과  업  지  시  서

[용 역 명 : 용인지사 건축물 내진보강공사 구조 및 건축 설계용역]

2020. 05.

한국석유공사

용 인 지 사

- 목    차 -

Ⅰ. 용 역 설 명 서

Ⅱ. 일 반 시 방 서

Ⅲ. 특 별 시 방 서

Ⅳ. 예 정 공 정 표

Ⅰ. 용 역 설 명 서

1. 용 역 명 : 용인지사 건축물 내진보강공사 구조 및 건축 설계용역

2. 목  적

“지진·화산재해대책법”에 의거 기존 건축물의 내진보강사업의 일환으로 실시한 2018년도 비축기지 건축물(연면적 200㎡ 이상) 내진성능평가 결과를 토대로 내진보강공사를 위한 구조 및 건축 설계용역을 추진하고자 함

3. 대상건물

보강공사 건축물	층수	연면적(㎡)	구조	예상공사비(천원)	비고
자재창고(영선실)	지상1층	248	철근콘크리트	44,775	부가세 제외
폐수처리실	지상1층	432	철근콘크리트	142,328
작업실(소방차고)	지상1층	327.6	철근콘크리트	46,200

4. 용역개요

건축물 내진성능평가 결과에 따라 대상 건축물에 적합한 내진보강공법 검토 및 선정하고 이에 따라 실시설계 실시 및 인허가 업무 수행

5. 용역기간 : 계약일로부터 60일간

6. 설계금액 : 28,402,000원(VAT 포함)

7. 예산과목 : 용인지사 공통 / 건물

8. 손해배상보험 요율 : 0.492% (공용청사건설공사)

※ 설계·건설사업관리 용역손해배상공제 공제요율 [2019.12.30.일 이후 입찰공고분]

Ⅱ. 일 반 시 방 서

1. 적용범위

본 시방서는 “용인지사 건축물 내진보강공사 구조 및 건축 설계용역”에 적용하며, 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 특별시방서에 준하며, 특별 시방서에 명시되지 않는 사항은 일반 관례에 따른다.

가. 본 용역은 국토교통부에서 발행한 각종 시방서와 당 공사에서 발행한 제규정, 본 시방서 및 설계서를 기준으로 하여 시행한다.

나. 본 시방서에 명기되어 있지 않거나, 해석상의 불분명한 경우가 생길 때는 본 공사와 유사한 공사의 실례와 각종 문헌을 근거한 감독원의 해석에 따른다.

2. 감 독 원

본 용역의 설계 및 시공을 위한 감독의 기능을 행사하는 당 공사의 직원을 말한다.

가. 감독원의 직위 및 성명은 당 공사가 도급자에게 통지한다.

나. 도급자가 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독원을 경유해야 한다.

3. 착수계 및 기타 제출서류

가. 도급자는 착수계 제출 시 다음 제반서류를 계약일로부터 7일 이내에 제출하여야 한다.

① 착수계

- 사업 책임기술자 선임계 (이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

- 각 분야별 용역비 산출내역서

- 과업수행계획서

·관련 분야별 업무범위와 책임 한계

·분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

·각 분야별 인력투입계획

·예정공정표

·기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

② 보안각서

4. 설계서 해석

가. 도급자는 계약 전에 설계서의 내용을 숙지하여야 하며, 계약 후에 의문점이 생겼을 경우에는 관계법령 및 관례에 따른다.

나. 본 설계서의 내용 또는 불합리한 사항이 있을 때는 감독원과 협의한다.

다. 본 설계서에 규정하지 않는 사항이라도 기능상 필요하다고 인정되는 사항은 감독의 지시에 따라 시행한다.

5. 안전관리

가. 본 용역을 수행함에 있어 도급자는 안전관리에 만전을 기하여야 하며 산업안전보건법, 우리공사 안전작업규칙 및 기타 안전수칙을 준수 하여야 하고 용역중 도급자의 귀책사유로 발생한 제반사고에 대하여는 도급자가 책임지고 도급자 부담으로 복구 및 변상하여야 한다.

나. 작업장 내에서는 안전모를 착용하는 등 안전조치를 충분히 한 후 용역을 실시하여야 한다.

다. 호우, 태풍, 홍수 등에 대한 기상예보 등에 충분히 유의하여 유사시 피해를 최소화하기 위한 응급조치를 취하여야 한다.

라. 용역장소에는 구급약을 상비하여 응급처치 할 수 있도록 해야 한다.

6. 사고보고

가설물이나 구조물의 파손, 기타 용역에 영향을 미치는 사고의 발생 또는 그러한 사고 발생의 징조를 발견할 때는 응급조치를 취하고 즉시 감독원에게 보고 하여야 한다.

7. 제법규 준수

가. 용역시행에 있어 도급자는 제반 법규를 준수하여야 한다.

나. 노무자에 대한 제반법규의 운영과 적용은 도급자의 책임하에 이루어져야 하고 모든 행위에 대한 책임을 도급자가 져야 한다.

8. 특허권 사용

본 과업수행에 앞서 제3자 권리의 대상으로 되어있는 특허권 등을 사용할 때에는 도급자가 그 권리에 대한 일체의 책임을 져야한다.

9. 설계변경

아래사항에 대하여 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법 및 동법 시행령 범위 내에서 감독원의 승인을 득하여 설계를 변경할 수 있다.

가. 본 설계서에 누락된 부분의 공정이 발생하였을 때.

나. 본 용역에 관한 우리공사의 방침이 변경되었을 경우에는 우리공사의 방침에 따라 설계를 변경 할 수 있다.

다. 설계서에 누락되어도 용역수행에 필요한 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행한다.

10. 보안유지

가. 도급자는 정부 및 우리공사 보안업무 규정의 준수사항을 이행하여야 한다.

나. 도급자는 우리공사가 보안상 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 절대적으로 따라야 한다.

다. 본 용역에 투입되는 작업인원에 대하여는 사전 우리공사에 명단을 제출하여 출입증을 교부받아야 한다.

11. 용어해석

본 시방서의 해석에 이의가 있을 때는 감독원과 협의하여 원만히 해결토록 한다.

12. 용역기간

본 용역의 추진을 위하여 합리적인 공정계획에 의하여 용역감독원의 지시에 따라 시행하여야 하며, 다음의 경우에 한하여 우리공사의 승인을 얻어 용역기간을 조정할 수 있다.

가. 천재지변 등 불가항력적인 사유로 작업이 불가능 하였을 때

나. 우리공사의 귀책사유로 작업이 중단되었을 때

13. 성과품의 소유

과업수행으로 인하여 발생되는 각종 성과품은 발주처의 소유로 하고, 감독원의 승인 없이 제3자에게 제공하거나 본 과업의 목적 외에 이용하여서는 안된다.

14. 손해배상보험(공제) 및 하자보증

도급자는 본 용역을 이행할 때 고의 또는 과실로 본 용역의 목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우 그 손해를 배상하여야 하며, 이 배상을 담보하기 위해 보험 또는 공제에 가입하여야 한다. 또한, 도급자는 관련법령(건설기술 진흥법 제34조 등)에 따라 하자 대상 용역인 경우, 하자책임을 보증하기 위해 하자보증금 예치 및 보험증서 등을 발주청에 제출하여야 한다.

Ⅲ. 특별시방서

1. 적용범위

본 시방서는 “용인지사 건축물 내진보강공사 구조 및 건축 설계용역”에 적용한다.

2. 적용 법령 및 기준

가. 공통

1) 「지진·화산재해대책법」 및 「동법 시행령」

2) 콘크리트 구조설계 기준

3) 콘크리트 표준시방서

4) 강구조 설계 기준

5) 건설기술관리법 품질시험규정 등

나. 건축물

1) 「건축법」 및 「동법 시행령」

2) 기존 공공시설물(건축물) 내진보강 업무처리 가이드라인(2018.03)

3) 내진보강사업 대가산정 가이드라인(2019.08)

4) 건축설계기준(KDC 41)

5) 건축물 내진설계기준(KDC 41 17)

3. 설계지침

본 과업지시서는 설계상의 제반 조건을 규정한 것으로 설계 진행의 일관성을 유지하고 원활한 시공을 도모하기 위한 지침을 정하는데 그 목적이 있다.

가. 일반조건

1) 본 과업지시서에 명시된 사항은 설계자 임의로 해석할 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 누락 및 오기된 경우에는 감독원과 협의하여 처리하되, 의견이 불일치 될 경우 과업지시서와 관련규정상 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

2) 본 설계 기술지침은 최소한도의 기준을 명시한 것으로 설치 및 시공된 후에 동등 이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다.

3) 주요 자재 및 품질관리 지침은 다음과 같다.

① 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질 수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 한다.

② 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 관련자재의 K.S.에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후 관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.

③ 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재를 사용하여서는 안된다.

나. 적용기준

도급자는 계약문서와 관련법규 그리고 최신(근)의 정부 제정 각종 공사시방서 및 기준에 의거(적용하는 기준은 최신에 제정된 것을 우선하여 적용) 설계를 수행하여야 한다.

다. 성능기준

본 사업의 설계는 다음의 성능 이상이 확보되어야 한다.

1) 모든 시설은 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 하며, 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 방진, 내진, 내풍, 내설, 내충격 성능을 가져야 한다.

2) 부식성 자재는 사용하지 않는 것을 원칙으러ㅗ 하되 부득이 사용해야 할 경우 방청처리를 통해 최대한 부식되지 않도록 하여야 한다.

3) 자재 등은 부위별, 용도별로 일반적인 기준으로서 가장 내구성이 높은 동급의 것을 사용하여야 한다.

4) 향후 설비시설의 원활한 교체를 위한 설계가 되도록 한다.

라. 구조설계 지침

1) 기본사항

① 구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 사용상이나 미관상 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

② 구조물의 균열 발생을 최소화할 수 있도록 계획하여야 한다.

③ 구조 형식 및 단면의 크기 등은 시공성을 고려하여 정하여야 한다.

④ 구조의 안전 성능은 본 과업지시서 2.항의 적용기준 및 기타 법령 등 정부에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

⑤ 설계자는 동 설계가 건축법상 대수선에 해당될 경우 대수선 승인 관련 서류를 제출하여야 한다.

⑥ 구조계산서는 그 내용 구성과 선후 관계를 분명하게 작성하여 이해하기 쉽게 한다.

2) 구조계획

① 모든 구조 부재의 배치는 합리적이어야 한다.

② 구조 부재 배치 및 구조 형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조 해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

③ 가급적 2차 응력이 발생하지 않는 구조로 한다.

④ 처짐 등의 변형 및 진동을 최소화 시킬 수 있는 구조로 한다.

⑤ 비정형 구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는 이를 보완하는 방법을 제시해야 한다.

3) 구조설계

① 모든 부재의 설계에 적용된 해당 기준을 명시한다.

② 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 기준 및 지침을 명시한다.

③ 설계기준 적용에 있어서 단일기준(같은 계열의 참고기준 포함)을 일관성 있게 적용하도록 한다.

4) 구조해석

① 구조해석용 프로그램은 보편적으로 공인된 것을 사용하고, 그렇지 못한 프로그램을 사용하는 경우에는 해석 내용이 보편적인 프로그램과 비교하여 차이가 없음을 증명하는 자료를 첨부한다. 단, 그 자료는 공인된 기관에서 인증을 받은 것이어야 한다.

② 구조해석용 프로그램의 입력 자료는 구조해석 모델의 약도와 같이 제시하여야 하고, 출력 자료는 부재별, 층별로 선후 관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리한다.

5) 시방서 작성

① 구조설계의 시방서는 실제 공사에 요구되는 시방을 구체적으로 작성하여야 한다.

② 특수공법을 적용하는 경우에는 시공 매뉴얼을 제출하여야 한다.

마. 건축설계 지침

1) 재료

① 재료는 시설물의 특성 및 기존 건물과의 조화를 고려하여 선택한다.

② 경제성 및 내구성이 좋은 재료를 선택해야 하며 유지, 보수가 용이하고 수급성 및 시공성 또한 재료를 선택시 고려해야 한다.

2) 마감설계

① 마감공법에 조적벽이 선정된 경우에는 구조체에 긴결되어야 한다.

② 마감공사에 외벽공사 및 창호공사가 포함될 경우에는 「녹색 건축물 조성 지원법」에 따른 ‘건축물의 에너지 절약 설계기준’을 적용하여야 한다.

③ 공사범위에 석면공사가 포함될 경우에는 「석면 안전관리법」에서 정하는 기준을 적용하여야 한다.

3) 시방서 작성

① 건축설계의 시방서는 실제공사에 요구되는 시방을 구체적으로 작성하여야 한다.

② 철거공사, 폐기물처리공사, 조적공사, 미장 및 수장공사, 창호 및 유리공사 등은 도면, 공법에 적합하고 현장시공성을 고려하여 작성하여야 한다.

③ 특히, 이질재 접합부, 재료나누기, 보양 및 현장정리 등은 도면과 시방서가 일치하도록 작성하여야 한다.

4) 공사비 산정

① 수량산출서 작성은 설계도면에 의거 수량을 산출하고 할증 요율을 적용하여야 한다.

② 건설공사 표준품셈과 일위대가표는 적용근거를 제시하여야 한다.

③ 견적가격을 적용할 경우에는 단가 적용의 타당성과 적정성을 검토한 후 단가대비표를 작성하여야 한다.

④ 수량산출서, 일위대가표, 단가대비표 등을 토대로 내역서를 작성하고, 제잡비 요율, 안전관리비, 공사손해보험료 등 발주자가 제공하는 기준을 적용하여 원가계산서를 작성한다.

5) 도면작성

① 기본설계도서 및 현장조사 결과를 반영하여 내진보강공사가 가능한 실시설계도면을 작성해야 한다.

② 설계도면은 초급기술자나 기능공이 쉽게 이해할 수 있도록 상세하게 작성해야 한다.

4. 과업범위

가. 기존 내진성능평가 및 현장조사 자료 분석

나. 내진성능평가 (성능기반평가)

다. 건축물의 구조해석 및 구조계산을 통한 내진성능 상세평가

라. 최소 2개 이상의 내진보강안 및 보강비용 제시

마. 실시설계

바. 설계도면 작성

사. 3자검증 설명 및 자료제공 등 대응 (정부 가이드라인에 따른 3자검증 필요시)

아. 보고서 작성

자. 관련기관 인·허가 및 협조(필요시)

5. 과업 세부내용

가. 구조설계

1) 과업항목 및 세부과업

과업항목	세부과업	비고
해석의 종류	• 시간이력해석법, 비선형해석법, P-∂ 효과를 고려한 해석법 등
해석의 범위	• 정밀내진해석
자료수집 및 분석	• 준공도면, 구조계산서 등 • 기타 유지관리 관련자료
결과분석	• 수집자료, 육안조사 결과분석 • 비파괴현장시험 결과 분석(필요시)
구조검토 및 내진성능평가	• 조사, 시험, 측정결과의 분석 • 이론적 해석결과의 분석 • 부재별 지진저항력 평가, 내진성능수준의 판정 • 내진성능평가
보강 방안 작성	• 보강공법을 경제성, 시공성, 유리관리 상 장단점 비교 검토 후 최적의 내진보강 방안 제시 • 보강설계도서 작성 (산출내역서,보강도면,시방서,공사비,시공상유의사항등)
보고서	보고서 작성

2) 기초자료 수집 및 분석

·내진성능평가 보고서 분석 및 관련 법규, 기준 및 매뉴얼 등의 분석

·대상 시설의 현황조사를 위한 추가 현장조사(필요시)

3) 현장조사 및 시험(필요시)

·현장조사 : 사용실태 조사(용도변경, 구조변경, 실별 사용하중 등)

·비파괴 현장시험 : 현장조사 및 비파괴시험(검사) 등을 실시하여 내진성능평가 및 내진보강설계에 필요한 항목을 상세히 조사

4) 현장조사 결과 분석

현장조사 결과 분석은 정밀 육안조사와 비파괴 장비조사에서 확인된 조사내용을 공학적으로 분석하여 내진성능 평가에 필요한 정확한 정보를 제공하기 위해 실시한다. 또한 건축물의 보수·보강 이력 및 상태, 현 건축물의 여건, 주위의 환경적 요인 등을 함께 조사, 정리하여 내진보강방안 수립 시 적용하여야 한다.

5) 구조검토 및 내진성능 평가

·구조검토 및 내진성능평가의 절차 및 방법은 관련 규정에 의거 적합하고, 객관적인 결과를 도출하여야 한다.

·내진성능 상세평가를 위해 비선형 해석방법을 사용하는 경우 대상 시설물의 내진성능을 정확히 평가하고, 평가기준 지진에 의하여 발생할 수 있는 피해의 정도를 정밀하게 예측한다.

·내진성능평가는 예비평가, 1단계 상세평가, 2단계 상세평가의 단계로 진행한다. [비정형시 각 단계 제외]

6) 내진보강 방안 제시

내진성능 보강방안은 내진성능평가 결과를 근거로 보강방안을 제시한다. 즉 해당 시설물의 내진성능 요구 수준인 즉시거주, 인명안전, 붕괴방지 등의 목표 내진성능 수준을 만족할 수 있도록 다음과 같은 조건을 고려하여 최적의 내진성능 보강방안을 제시한다.

·보강 대상 시설물의 종류, 부재요소 선정

·보강부위 내진안전성, 경제성, 시공성, 보강효과, 유사 공법과 비교하여 종합적 검토 시행

·보강재료 및 보강공법에 따른 현장시공 시 제약조건 고려

① 기 운영중인 시설의 기능변경 최소화

② 기능변경이 불가피할 경우 발주청과 협의하여 대안 수립 및 반영

③ 특수 시공이 요구될 경우 그에 대한 시방 또는 특기사항 표기

④ 보강 설계도서 작성

- 보강설계(보강위치 및 보강자재를 포함한 설계도면)

- 개략공사비 및 시방서

7) 대상 시설물의 내진성능평가 결과에 따라 향후 시설물의 유지관리 시 유의사항 및 유지관리 방법 등을 포함한 유지관리방안을 작성한다.

나. 실시설계

❍ 내진보강 구조설계 결과에 따라 선정된 내진보강공법을 기존 건축물에 적용 및 보강공사를 실시하기 위한 실시설계

- 자재창고(영선실) (248m2)

- 폐수처리장 (432m2)

- 작업실(소방차고) (327.6m2)

❍ 실시설계의 작성내용

1) 설계 설명서

가) 공사개요

나) 설계개요

다) 세부공정계획(공사계획평면)

라) 건축물 내·외부 마감표 등 세부 마감자재 계획

마) 기타 필요한 사항

2) 시방서

가) 일반시방서

나) 특별시방서: 표준시방서에 준하는 일반적인 내용은 배제하고 금회 설계용역에 해당되는 재료의 특성 및 시공법 등에 한하여 작성하되, 특히 설계도면과 시방서와 내역서 단가적용 품목이 상호 일치되도록 할 것

3) 설계건물배치도: 세부적으로 설계 건물배치 현황을 전체 건물배치도에 준하는 표시

4) 각층 평면도: 보수 전, 후로 각각 각층의 계획 및 시공에 필요한 사항 일체

5) 단위 평면도: 각층 평면도로 파악이 곤란한 부분으로 시공에 필요한 사항 일체

6) 입면도

7) 주단면도

8) 부단면 상세도: 주단면도로 파악이 곤란한 부분으로 시공에 필요한 사항일체

9) 공사비 산출관련 내역서

가) 공종별 세부내역서

나) 일위 대가

다) 수량산출서

라) 기타 필요한 산출근거

다. 관련기관 인·허가 및 협조(필요시)

- 계약상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축허가(대수선 포함)에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

- 계약상대자는 동 사업 인·허가사항에 대하여 발주처와 협의하여 가능한 용역기한 내에 건축승인 등 모든 행정절차를 완료하여야 한다.

라. 특기사항

- 내진성능평가 시 기존 건축물에 대한 손상 및 결함에 대한 보수방안 제시 내용을 충분히 검토 후 설계에 반영한다.

- 사용자 및 관리자의 요구 수준에 부응할 수 있고, 예산 범위 내 경제적인 방법을 제시한다.

- 에너지 절약계획 등 시공 및 유지관리의 효율성을 고려하여 설계에 반영한다.

- 최초 설계 단계에서 기존시설을 충분히 조사하고 설계에 반영하여 추후 공사 시 설계와 현장이 불일치하는 일이 발생되지 않도록 한다.

- 과업범위의 내용 중 금회 설계용역에 적용이 어려운 부분은 발주처와 반드시 협의하여 결정한다.

- 설계내역서 작성에 있어 물량의 누락, 자재의 표기 모호함, 단가의 잘못 적용 등으로 공사 계약자로부터 설계변경요구 등 상당한 문제점이 야기되므로 설계내역서 작성에 신중을 기한다.

- 용역자는 고의 또는 과실로 인하여 당해 용역 목적물 또는 건축주 및 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우는 그 손해를 배상할 책임이 있으며, 용역자는 손해배상책임을 보장하기 위하여 실시설계를 완료하기 전 보험 또는 공제에 가입하여야 하며 그 증서 등을 납품 시 제출하여야 한다.

6. 설계도서의 작성 및 제출

가. 제출도서는 앞에 기술한 과업범위에 포함된 내용으로 한다.

나. 제출도면 및 서류

도 서 명	부 수	규 격	제출기일
(1) 착수신고서 ․ 사업 책임기술자 선임계 ․ 각 분야별 용역비 산출내역서 ․ 과업수행계획서 등	1부	A4	계약 후 7일 이내
(2) 보안각서	1부	A4	계약 후 7일 이내
(3) 내진보강설계(구조설계) 보고서 ․ 성능기반내진성능평가 보고서 ․ 일반공법(또는 특수공법)설계 보고서	3부	A4	납품 시
(4) 설계설명서	3부	A4	납품 시
(5) 실시설계도서 ․ 시방서(공통, 특기) ․ 추정가격내역서(설계내역서) - 수량산출서 - 단가산출서, 단가비교검토서(필요 시) - 일위대가표 - 원가계산서 ․ 설계도면(A3)	3부	A4 A3(도면)	납품 시
(6) 기타 필요한 자료 및 서류 ․ 인허가 도서(필요 시) ․ 성과품 USB(구조해석파일 포함한 전체 성과품)	1부 2장	A4 전자파일	납품 시

다. 감독청에서 지정한 프로그램으로 도면 및 내역과업을 수행하여야 한다.

❍ 도면 : AUTO CAD 파일, 폰트파일 및 플롯스타일

❍ 설계내역서, 수량산출서, 단가산출서, 각종 계산서 등 : EXCEL 형식

라. 도면명(파일명)은 반드시 한글로 표시하여야 한다.

(예 : 배치도, 주단면상세도 등)

마. 도면 및 관련서류 전체를 USB저장매체에 저장하여 2개 제출하여야 한다.

바. 본 과업의 설계내역서는 표준품셈을 기준으로 작성하여야 하며, 예산서 항목은 총공사비, 도급공사비, 지급공사비 등으로 구분한다.

사. 공종별 단가는 일위대가를 단가산출서상에 명시하여야 한다.

아. 적용품셈은 당해연도 건설공사 및 전기․정보통신 표준품셈에 준하되 품셈에 없는 사항에 대해서는 참고 서적명을 명시하며, 우리공사와 협의 후 적용하여야 한다.

자. 노임단가는 설계종료시점의 대한건설협회 최근 공표 시중노임단가를 기준으로 한다.

차. 일반관리비율 등은 예산회계 관계법령 기준에 따른다.

카. 산재보험료 및 안전관리비는 고용노동부에서 고시하는 기준에 따른다.

타. 고용보험료, 폐기물처리비 및 환경보전비 등 관련 법규에서 정하는 사항을 여건에 맞게 적용한다.

파. 재료단가는 기획재정부 장관이 지정하는 전문가격 조사기관이 조사하여 공표한 가격으로 하며, 원가조회 견적 적용시에는 2개소 이상 관련자료를 제출하여야 한다.

Ⅳ. 예정공정표

❍ 용 역 명 : 용인지사 건축물 내진보강공사 구조 및 건축 설계용역

구 분	일 정
	1 Month			2 Month
	10	20	30	40	50	60
기초자료 및 현장조사
구조설계 및 내진보강안 제시
실시설계
보고서/성과품 작성 및 제출