< 10.13. 정상화(예정)에 따른 계획일정 안내 >

연번	건명	금액 (억원)	착공일	당초		복구 후(10.13.예정)				진행현황
				입찰 공고일	심사일 (개찰일)	입찰공고일 (정정공고일)	공동도급·소방PQ 마감	제안서 마감	심사일 (개찰일)
1	인천계양 A6BL	269	25-09-30	8-04	9-18	변경없음				계약체결전
2	평택고덕 A-63BL	146	25-10-17	8-12	9-25	변경없음				낙찰자선정전
3	부천대장 A-1BL	233	25-10-20	8-18	9-30	변경없음			25-10-21	정성평가(심사)전
4	고양창릉 S-1BL	110	26-01-15	8-26	10-21	변경없음			25-10-22	정량,정성평가(심사)전
5	밀양부북 A-1BL	135	26-01-15	9-15	11-03	10-13 * 복구일 일괄 정정공고 (복구일정에 따라 변동 가능)	10-17	10-21	변경없음	입찰마감전
6	강원인제마을정비형(SOQ)	34	25-12-31	9-16	11-04(11-11)			10-22	11-04(11-17)	〃
7	평창장평고령자복지주택(SOQ)	34	25-12-31	9-17	11-05(11-12)			10-23	11-05(11-17)	〃
8	강원정선2마을정비형(SOQ)	36	25-12-31	9-18	11-06(11-13)			10-27	11-06(11-18)	〃
9	수원당수 B-3BL	111	26-01-15	9-19	11-07			10-28	변경없음	〃
10	시흥하중 A-3BL	68	26-01-15	9-22	11-10			10-29	변경없음	〃
11	양평공흥(고령자)	55	26-01-14	9-23	11-11			10-30	변경없음	〃
12	남양주왕숙2 A-1BL	226	25-12-31	9-24	11-11			11-03	변경없음	〃
13	군포대야미 A-1BL 2공구	106	26-01-14	9-26	11-12			11-04	변경없음	〃
14	경산대임 A-3BL	141	26-01-14	9-26	11-12			11-04	변경없음	〃
15	군산신역세권 A-1BL	142	26-01-15	9-26	11-13			11-04	변경없음	〃
16	석문국가산단B-6BL	162	25-12-31	9-26	11-13			11-04	변경없음	〃
17	양주회천 A-26BL	168	26-01-15			10-13~15 * 3일간 일괄 공고 (복구일정에 따라 변동 가능)	10-24	11-05	11-14	입찰공고전
18	성남복정2 A-1BL 1공구	211	26-01-15					11-05	11-17	〃
19	부산강동 A-2BL	113	26-01-15					11-06	11-18	〃
20	행정중심복합도시 5-2 L2BL	116	25-12-01					11-06	11-18	〃
21	구리갈매역세권 A-2BL	145	25-12-31					11-07	11-19	〃
22	인천영종 A-62BL	154	25-12-15					11-07	11-19	〃
23	화성병점 복합타운주상복합	161	26-01-06					11-11	11-20	〃
24	시흥거모 A-7BL	172	26-01-15					11-11	11-20	〃
25	남양주왕숙 A-17BL	182	25-12-31					11-12	11-21	〃
26	시흥거모 A-3BL	196	26-01-15					11-13	11-24	〃
27	충남도청이전RH15BL	216	26-01-15					11-14	11-25	〃
28	평택고덕 Abc-12BL	229	25-12-31					11-14	11-25	〃
29	부천종합운동장역세권 A-1BL	271	25-12-31					11-18	11-26	〃