2004년도

배전공사 협력업체 업무처리기준

2003.  11

한국전력공사

1. 목 적

배전공사의 적기시공과 고장 발생시 신속한 복구체제를 확립하고 협력업   체의 책임의식을 고취함으로써 공사 시공품질 향상을 통한 배전설비의 건설 및 유지관리에 만전을 기하고자 한다.

2. 적용범위 및 대상공사

가. 적용범위

(1) 추정가격(부가가치세제외) 2,000만원 이하의 배전공사에 적용을 원칙

으로 하며, 신규공사인 경우 인입선 및 저압선 일부의 시공은 필요에

따라 내선시공자가 시행할 수 있다.

(2) 다만, 재해 등 돌발고장에 대한 긴급복구가 필요한 공사에 대해서는

상기 (1)항의 추정가격에 관계없이 선 시공지시 할 수 있다.

나. 대상공사 구분

(1) 고압단가계약 공사 (고압협력업체 수행공사)

(가) 계약된 사업소내(지사직할, 지점)에서 발생되는 배전설비 공사중

저압단가계약 공사를 제외한 모든 배전공사

(나) 활선 또는 무정전공사 등의 시공은 정전 감소효과, 현장여건 등을

고려하여 시공부서장이 결정한다.

(2) 저압단가계약 공사 (저압협력업체 수행공사)

380V동력승압공사, 전압단일화공사, 전력량계 교환공사, 전력량계 유          지보수공사, 저압삼상 해지시공, 인입선 정비공사(인입용 전주시공           포함) 및 필요에 따라 당사에서 지시하는 외선불요 인입선 소요분           신규공사

다만, 전주교체, 변압기교체 및 7,000V를 초과하는 설비의 공사가 수          반되는 경우는 제외한다.

다. 적용의 배제

(1) 공사의 시급성 또는 특수성으로 인하여 사업소장이 필요하다고 인정          하는 경우에는 배전공사 단가계약으로 발주하지 않을 수 있다.

(2) 배전공사의 부대공사로 전기공사업 이외의 공사업 면허(조경, 통신등)

를 필요로 하는 공사는 별도의 계약으로 시행할 수 있다.

3. 협력업체 운영

가. 지역분할

(1) 고․저압 협력업체의 지역분할은 원칙적으로 시행하지 아니한다.

다만, 긴급공사 등 선시공 공사에 한해서는 공사의 원활한 수행을            위하여 필요시 사업소장 책임하에 사업소내 지정된 고압협력업체를

대상으로 지역을 구분하여 지역 전담체제로 운영할 수 있다.

(2) 여러개의 도서지역을 관할하는 사업소의 경우 지리적 특성상 도서지역

을 분할하여 운영함이 타당할 것으로 판단되는 경우 추정도급예산액

을 고려하여 해당 사업소장의 책임하에 고압협력업체에 대한 지역을

분할하여 운영할 수 있으며,  이 경우 분할지역수는 3-나항에 의거

산정된 협력업체수에 의거 확정한다.

나. 고압협력업체수 결정

(1) 고압협력업체수의 결정은 사업소 단위 최근 2년간 연평균 공사실적에

근거하여 추정도급예산액을 기준으로 해당 사업소장이 아래와 같이

산정, 결정한다.

(가) 협력업체수 = 추정 총도급예산액(부가가치세 포함) ÷ 1,530백만원

(나) 추정 총도급예산액 = (A + B) ÷ 2

○ A = ‘01년도 고압단가공사중 긴급고장 복구비 및 2천만원이하 도급비 실적 합산치

○ B = ‘02년도 고압단가공사중 긴급고장 복구비 및 2천만원이하 도급비 실적 합산치

※ 협력업체수 산정은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 첫째자리에서 4사5입

(2) 다만, 특별한 사유로 협력업체수의 조정이 필요한 경우에 한하여 1차

사업소의 심의를 거쳐 타당성을 검토하고 본사 승인을 득한후 업체수

를 조정할 수 있다.

(3) (2)항의 특별한 사유라 함은 다음과 같다.

추정 총도급예산액을 산정하는 '01년도 및 '02년도의 단가계약공사           실적이 수해복구, 대단위 택지개발, 심야수용 등으로 과거 연평균 공사          실적보다 과다하게 반영되어 향후 전망되는 추정도급액이 기준치보          다 현저하게 감소될 것으로 예상되거나 또는 향후 전망되는 추정도          급액이 기준치보다 현저하게 증가할 것으로 예상되는 경우

(4) 고압협력업체수 산정결과 1미만인 사업소는 협력업체수를 1로 한다.

다. 저압협력업체수 결정

저압협력업체수는 각 사업소당 1개 업체를 원칙으로 한다.

라. 입찰대상 공사건수 결정

(1) 고압협력업체는 상기 3. 나 항의 고압협력업체수 산정결과에 따라

입찰대상 건수를 결정한다.

(2) 저압협력업체는 사업소 단위 1개를 입찰대상 건수로 결정한다.

☞ 협력업체수 산정결과와 입찰대상 건수는 동일하여야 함

4. 추정도급예산액

가. 고압 단가계약공사

고압 단가계약공사의 추정도급예산액은 부가가치세를 포함하여

1,530백만원으로 한다.

나. 저압 단가계약공사

저압 단가계약공사의 추정도급예산액은 2004년도 사업소별 전압단일화

공사 및 전력량계 교체공사 중 적용범위에 대한 본사배정 추정예산액

(부가가치세 포함 금액)으로 한다.

5. 업체선정

가. 입찰집행

입찰집행은 전자입찰로 시행함을 원칙으로 한다.

나. 입찰참가자격

입찰공고일 전일 현재 해당사업소(지사직할, 지점)의 공사별 현장이    소재하는 특별시, 광역시, 또는 도의 관할 구역안에 주된 영업소를  두고 있는 전기공사업등록업체(단, 개찰일까지 계속 유지하여야 함)

다. 중복낙찰 제한

(1) 낙찰예정자 결정순서는 고압단가를 먼저 “라”항 2)의 입찰순번에 따라 순차적으로 결정하되, 2개 고압단가공사 이상 낙찰예정자는 당해 낙찰예정자의 주된 영업소가 소재한 지점관내 단가공사를 우선하여 낙찰예정자로 결정한다. 저압단가도 같은 방법으로 결정한다.

☞ 즉, 주된 영업소 소재 사업소와 타 사업소에서 중복 낙찰예정자로 선

정된 경우에는 타 사업소 낙찰(예정자)은 자동 제외한다.

☞ 또한, 업체가 소재한 지점관내에서 낙찰예정자로 되지 않고, 서로 다른 중점지사군에서 각각 낙찰예정자로 된 경우에는 당해 업체의 주된 영업소 소재지가 속한 중점지사내의 단가공사를 우선하여 낙찰예정자로 결정한다.

(2) 고․저압 단가계약의 구분없이 적격심사 결과 1개 단가공사에 낙찰예정자로 선정된 업체는 다른 단가공사의 고압 또는 저압단가계약 낙찰예정자로 선정될 수 없다.

라. 입찰시행방법

(1) 중점지사, 관리사업소 및 임무

○ 중점지사 : 1개 도내에 2개이상 지사가 있는 경우 선순위 직제인 지

사를 중점지사로 하되 선순위 직제인 지사가 광역시에 소재하는 경

우는 차순위 직제인 지사를 중점지사로 하며, 예외적으로 지점을 중

점지사로 선정(별표9 참조)할 수 있다.

○ 중점지사임무 : 관리사업소 결정 및 관리, 입찰순번 부여, 중복낙찰

예정자 파악, 낙찰예정자 결정 등 관리사업소 임무를 제외한 업무 수행

○ 관리사업소 : 중점지사가 소재하는 특별시, 광역시, 도의 소재지에

주소를 둔 지사직할 및 지점

○ 관리사업소 임무 : 해당 사업소의 입찰대상 공사에 따라 입찰공고, 입찰집행, 적격심사대상자 1순위～10순위자 결정, 적격심사, 적격심사 결과를 중점지사에 제출, 낙찰자와 계약체결업무 수행

(2) 입찰순번부여

○ 중점지사는 해당관리사업소의 입찰대상 공사건수를 제출받아 직제순           에 의거 입찰순번을 부여하고, 이를 관리사업소에 통보한다.

○ 입찰순번은 고압부터 직제순으로 순번을 정한 뒤 계속하여 저압을

직제순으로 순번을 정한다.

(3) 입찰방법

○ 중점지사 직할 및 관리사업소는 아래와 같이 입찰을 시행한다.

- 공사주관부서는 공종별 공사비단가 및 설계기준에 의거 추정가격

2,000만원(부가가치세 제외)이하 공사의 서로 다른 가상설계서를 입찰대상 공사건수 만큼 작성하여 계약부서로 송부한다.

- 계약부서는 각각의 가상설계서에 대한 공사원가 예정가격 산출기초

조서, 예비가격기초금액을  작성한 후 입찰순번에 따라 차례대로 입           찰공고, 입찰(개찰은 가급적 수동개찰하되, 건별 개찰간격은 넓게)을           집행한다.

- 재공고 입찰을 실시한 결과 경쟁입찰이 성립되지 아니할 때에는

수의계약으로 계약상대자를 선정할 수 있다.

○ 관리사업소는 각 입찰공사 건별 예정가격 대비 적격낙찰율(86.745%) 이상 투찰업체중 가장 낮은 가격으로 투찰한 자를 1순위로 하여 10순위까지(필요시 사업소장이 조정 가능) 선정하여 해당업체로부터 적격심사서류를 제출받은 후 적격심사기준에 의거 심사하여 적격심사 결과표 [별표10]를 작성하고 이를 중점지사에 제출한다.

○ 중점지사는 관리사업소에서 제출받은 적격심사결과표를 집계하여

입찰순번에 따라 낙찰예정자를 결정하고, 그 결과를 관리사업소에

통보한다.

○ 관리사업소는 중점지사로부터 낙찰예정자 통보를 받은 즉시 계약

체결에 필요한 조치를 취하고 계약을 체결한다.

마. 입찰시기

배전공사 단가계약 투찰(입찰) 기간은 2003년 12월 2일부터 12월 4일까지 전국적으로 동시에 시행함을 원칙으로 한다.

바. 입찰 보증금

입찰보증금의 납부는 면제하되, 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제37조에 의하여 추정계약금액의 100분의 5 이상의 입찰보증금 지급각서를 제출(전자입찰시스템 이용)하여야 한다.

사. 낙찰예정자 구비사항

낙찰예정자로 결정된 업체는 계약체결시까지 다음에서 정하는 배전전공       과 장비 및 야적장을 확보하여야 하며 계약기간 동안 이를 상시 유지하       여야 한다.

(1) 상근 배전전공 확보기준

(가) 고압 협력업체

○ 정부, 당사 또는 당사에서 인정하는 교육기관에서 소정의 활선공법            교육을 이수한 배전활선전공 4명이상의 편조승인된 인원과 당사             또는 당사에서 인정하는 교육기관에서 기능평가 자격을 취득한 배            전전공 7명이상을 확보하여야 한다.

다만, 지중설비중 지상기기(변압기+개폐기)500대 이상 보유 사업소

에 소재하는 협력업체는 배전전공 7명중 배전지중전공 1명을 포함

하여 확보하여야 한다.

○ 협력업체 대표자 및 현장대리인은 상기 배전활선전공 또는 배전전공

과 겸임할 수 없다.

(나) 저압 협력업체

각 사업소 저압단가공사별 추정도급예산액 규모에 따라 다음과     같이 일반배전전공(배전활선전공 또는 기능평가 자격을 취득한 배  전전공도 인정가능)수를 확보하여야 한다.

○ 추정도급액 4억미만            :   4명이상

○ 추정도급액 4억이상 8억미만    :   6명이상

○ 추정도급액 8억이상 12억미만   :   8명이상

○ 추정도급액 12억이상           :  10명이상

(2) 장비 확보기준

(가) 고압 협력업체 낙찰예정자로 선정된 업체는 계약체결일까지 [별표1]

에서 정한 고압협력업체 필수장비를 확보하고, 무정전 공사를 수행

할 수 있도록 관할 1차사업소 주관으로 시행하는 무정전공사 현장

적용평가를 받아야 한다.

다만, 무정전공사 현장적용평가를 필한 업체는 생략할 수 있다.

(나) 저압 협력업체 낙찰예정자로 선정된 업체는 계약체결일까지 [별표2]

에서 정한 저압협력업체 필수장비를 확보하여야 한다.

(다) 위 ‘(가)’항 및 ‘(나)’항의 장비가 공사 수행중 손망실 등으로 활

용이  곤란한 경우는 즉시 교체, 수리, 보충하여 공사수행에 차질이

없도록 하여야 한다.

(3) 야적장 확보기준

고압협력업체는 300㎡이상의 야적장을 확보(임대, 업체간 공동사용 조        건도 가능)하여야 하며 공동사용의 경우 각각 300㎡이상을 확보하여야        한다.

아. 인원 등 확인방법

낙찰예정자가 결정된 경우 계약담당부서는 낙찰예정자를 공사 발주부서       로 통보하고 공사발주부서는 통보받은 업체의 인원 등의 보유여부를         ‘사’항의 기준에 따라 다음과 같이 확인한 후 그 결과(확보기준에 적합       한지 여부 명시)를 계약담당부서로 통보한다.

(1) 상근 배전전공

상근 배전전공은 낙찰예정업체의 입사확인서(국민연금관리공단에서          발행하는 국민연금 전산정보자료 자격원부 첨부)에 의하여 확인된 인원         으로 한다.

(2) 장 비

○ 각 품목별 기능, 동작상태, 수량 등 현장실사를 통해 확인하여야 하며           사진 등으로 증빙자료를 확보한다.

○ 보유장비중 임대한 장비는 공증을 받은 임대차 계약서에 의해 확인           한다.

(3) 야 적 장

토지대장, 등기부등본에 의한 소유여부를 확인하거나 공증을 받은 임         대차(임대차 기간은 계약이행기간 이상) 또는 공동사용 계약서에 의해         확인한다.

자. 계약체결

(1) 계약담당부서는 기준에서 정한 인원 등을 확보한 낙찰예정업체를 낙          찰자로 확정하여 계약을 체결한다. 인원, 장비(고압 협력업체의 경우          에는 무정전 현장적용평가를 포함한다.), 야적장 확보여부 확인결과           기준에 미달하는 경우에는 계약을 체결할 수 없다.

(2) 고압 및 저압 협력업체 낙찰예정자로 선정된 업체는 낙찰통지를 받은

후 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다.

다만, 사업소장은 1회에 한하여 일정기간(저압협력업체는 1개월이            내, 고압협력업체는 2개월이내)의 유예기간을 정하여 기준에 의한 인          원, 장비 및 야적장을 확보토록 할 수 있다.

(3) 입찰결과 적격심사에 따른 낙찰예정자 결정이 지연되거나, 업체 사정          으로 인하여 계약체결이 지연되어 유예기간을 부여하는 경우 해당           기간동안에 발생되는 공사는 다음과 같이 시행한다.

(가) 협력업체수가 1개인 경우 또는 다수의 협력업체중 모두가 계약체결이               지연된 경우에는 ‘03년도 기 계약된 협력업체와 연장계약하여 시공

(나) 다수의 협력업체중 일부는 계약체결이 완료되고, 일부가 계약체결이

지연된 경우에는 계약체결이 완료된 업체가 공사시공

(4) 유예기간이 경과하고도 인원, 장비, 야적장을 확보하지 못한 경우 당          해 단가공사는 새로운 입찰을 실시한다.

차. 계약 보증금

(1) 보증금산출(추정계약금액 × 10% )

입 찰 금 액

○ 추정계약금액 = 추정도급예산액 × ─────────

가상설계사정금액

○ 연대보증인이 없는 경우 추정계약금액 × 20%

(2) 납부시기 및 방법

계약체결전까지 현금 또는 시행령 제37조 제2항의 보증서등으로 납부한다.  다만, 계약기간내 추정계약금액이 증액된 경우 당초 납부한 계약보증금만으로도 계약이행에 지장이 없다고 판단될 경우 증액된 금액에 해당하는 계약보증금을 추가로 납부하지 아니하게 할 수 있다.

카. 계약기간

(1) 고압 및 저압 협력업체의 계약기간은 1년을 원칙으로 하며 그 이행기

간은 1월1일부터 12월31일까지로 한다. 다만, “자” (2)에 의한 유예기

간이나 낙찰자결정지연으로 계약체결일이 1월1일 이후인 경우에는 계

약체결일로부터 12월31일까지로 한다.

(2) 다만 계약기간중 영업정지 또는 부정당업자로 제재받은 사실이 없고          계약기간중 계약이행실태를 [별표6] 및 [별표7]의 기준에 따라 협력업          체 종합평가 결과 900점 이상 득점한 우수업체에 대하여는 업체가 동          의하는 경우 1년간 1회에 한하여 연장계약을 체결할 수 있다.

이 경우 평가기간은 계약 체결일로부터 12월 15일까지 함을 원칙으로 한다.

(3) 제"(2)"항에도 불구하고 우리회사에서 단가계약제도 운영방침 변경결정

등 특별한 사유로 인하여  연장이 불필요하다고 판단될 경우에는 연장         계약을 체결하지 아니할 수 있으며, 정부에서 시행하는 전력산업 구조         개편 계획에 따라 배전회사가 분할되어 각 배전회사에서 별도의 시         공체제 기준을 정하여 운영코자 할 경우에도 연장없이 각 배전회사의          기준에 따른다.

(4) 계약기간중 계약이행을 할 수 없는 업체가 발생하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우 당해 단가공사에 대한 재 계약업체와의 계약기간은 당해 계약서의 잔여계약기간으로 하며, 이 경우 연장계약은 할 수 없다.

6. 계약금액 산출 및 시공통보

가. 단위공사 계약금액 산출

(1) 공종별공사비단가에 의거 산출한 단위공사 설계명세서를 기초로 계약          부서에서는 사정금액을 결정하며, 단위공사의 계약금액은 사정금액에          공량단가율을 곱한 금액으로 한다. 다만, 공량단가율은 낙찰금액을 사          정금액으로 나누어 계산하며, 소수점 2자리 미만은 절사한다.

(2) 2004년도 공종별 공사비 단가는 2003년도 공종별 공사비단가에 물가          변동율을 반영하여 산정한 금액으로 한다.

(3) 총공사비가 2,000만원 미만인 단위공사는 산업재해보상보험법에 의거 산재보험을 일괄 가입한 경우에만 산재보험료를 경비비목으로 계상  할 수 있다.

(4) 총공사비가 34,000만원 미만인 단위공사는 고용보험법에 의거 고용보험을 일괄 가입한 경우에만 고용보험료를 경비비목으로 계상  할 수 있다

나. 준공 정산금액 산출

설계변경, 물가변동 및 기타내용 변경으로 인한 계약금액 조정이외에는        당초 계약금액을 준공정산 금액으로 하여야 한다.

다. 시공 통보

(1) 계약담당부서는 단가계약에 따라 발주되는 공사에 대한 일건서류를           공사 발주부서로부터 접수하면 당일에 시공통보서를 3부 작성하여           그중 1부는 계약부서에 보관하고 시공부서와 계약상대자에게 각1부          를 송부한다.

(2) 고압협력업체수가 1개인 사업소에서는 해당업체에 일괄하여 시공통보

하며,  2개 이상인 경우에는 다음에 의한다.

(가) 시공통보 순서

계약담당부서는 시공통보 할 해당 공사건이 발생한 시점을 기준으로

관내 협력업체 중 시공통보 누계금액이 가장 적은 업체에 시공통보

토록한다. 다만, 최초 시공통보는 기 입찰한 순번에 의거 시행한다.

(나) 예외조치 사항

① 협력업체중 본 기준의 11항(사후관리)에 의거 일정기간 제재를 받아  시공통보 중지를 받을 경우 해당업체의 제재기간 동안에는 사업소내 타 업체중 상기 (가)항을 적용하여 시공통보하며, 제재기간이 종료된 이후 기 제재받은 업체에게 다시 공사 시공통보시는 해당기간에 대한 보정금액을 계상한후 합산하여 상기 (가)항과 같은 방법으로 시공 통보한다.

② 5.자.(3).(나)항에서와 같이 업체사정으로 인하여 계약체결이 지연되어 유예기간을 부여한 경우 해당 유예기간 동안의 시공통보 방법은 상기 ①항에 따른다.

③ 보정금액의 계상은 제재기간중 타 업체에게 발행한 시공통보 금액의 합을 제재받은 업체를 제외한 타 협력업체수로 나눈값으로 한다.

(다) 전자공개 수의계약

협력업체수가 1개인 사업소에서 해당업체가 일정기간 제재를 받아 시

공통보 중지를 받은 경우 해당기간 동안의 공사는 전자공개 수의계약

에 의해 시행함을 원칙으로 하되, 공사 유형 따라 다음과 같은 입찰참

가적격업체를 대상으로 시행한다.

○ 무정전공사 : 전기공사업등록업체로서 무정전 적격업체

○ 활선공사   : 전기공사업등록업체로서 무정전 적격업체 또는 활선

적격업체

○ 사선공사   : 전기공사업등록업체

(3) 여러개의 도서지역을 관할하는 사업소에서 일부 단가지역을 분할하여

운영하는 경우 상기 (2)항에 관계없이 분할된 지역내 고압협력업체에게

시공통보하며, 본 기준의 11항(사후관리)에 의거 일정기간 제재를 받아

시공통보 중지를 받을 경우 해당지역 협력업체의 제재기간 동안에는

상기 (2)-(다)항에서와 같이 전자공개 수의계약에 의해 시행토록 한다.

(4) 설비고장이나 긴급안전조치 등 긴급한 공사의 경우 설비운영부서장           (또는 비상근무내칙에서 정한자)은 공사관리규정 제76조에 의거 선착         공지시를 할 수 있다. 이 경우 최단시간내에 복구가 가능한 업체나 2         개 이상의 업체에게 선착공지시를 할 수 있으며, 설비운영부서장은 복         구공사 완료후 즉시 설계명세서를 작성하여 계약부서로 계약을 의뢰         하여야 한다.

(5) 상기 (4)항의 선착공지시의 효율적 수행을 위하여 필요할 경우 사업소

자체적으로 지정된 고압협력업체를 대상으로 지역을 구분하여 지역 전담

체제로 운영할 수 있으며, 태풍 등 대규모 재해 발생시는 사업소내 전        협력업체를 대상으로 신속한 복구체제가 가능하도록 운영함을 원칙으        로 한다.

(6) 배전설비 운영상 협력업체 직원의 대기가 필요한 경우 배전설비 운영         부서장의 요청에 따라 협력업체는 소속직원을 대기하도록 하여야 하          며, 이 경우 배전설비 운영부서장은 적정대가의 대기수당을 지급할 수

있다.

7. 시공관리

가. 책임시공

모든 공사는 협력업체가 적정인력과 장비를 활용하여 책임 시공함을 원        칙으로 한다. 다만, 활선작업, 매설물 설치 등 기술적인 지원이나 현장        확인이 필요한 다음과 같은 공정의 경우에는 감리자(감독자) 등 관계직        원의 입회하에 시공토록 한다.

(1) 활선작업중 개폐기 신설 및 교체, 할입주신설, 전주교체

(2) 3Ø고압이상 선로의 중요 휴전작업

(3) 매설물, 은폐장소 또는 접근확인이 곤란한 장소 등 준공후 확인이            불가능한 작업

(4) 기타 중요한 공정으로 현장입회가 명시된 경우

(5)  상기 공종중 공사감리자(감독자)의 현장입회가 불가능한 경우에는 각

공정별 시공상태를 확인할 수 있는 사진 등 자료를 제출하게 할 수 있다.

나. 작업종사자의 자격

계약상대자는 당사에서 실시한 협력업체 종사자 교육 등 실무교육을 필       한 자로 하여금 공사를 시공, 관리하도록 하여야 하며, 교육 미이수자를       활용하고자 할 때에는 공사 시행전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

다만, 활선작업 및 무정전공사는 배전활선전공 자격증 소지자로서 활선작       업조에 편성된 자가 기준인원 이상 참여하여야 하며, 지중선케이블 접속       공사시에는 지중케이블 접속교육을 이수하고 자격을 취득한 배전지중전       공 2명 이상이 참여 하여야 한다.

다. 공사시공

계약상대자는 해당공사의 설계내역을 기초로 공사를 시행하며, 별도의        시방서가 없을 경우에는 당사에서 정한 설계기준 및 시공기준에 의거        시공함을 원칙으로 한다.

8. 안전 및 품질관리

가. 계약상대자는 공사현장의 안전관리에 대한 모든 책임을 지며, 안전보건         관리규정 제23조 제2항의 안전관리계획서를 시공부서에 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 매분기별로 안전관리비 집행내역서를 시공부서에 제출하        고 시공부서는 사용내역을 확인한 후 목적외 사용 및 미사용 금액을         회수하여야 한다.

나. 계약상대자는 안전사고 예방을 위하여 작업현장 안전관리에 철저를           기하고, 소속직원이 안전작업수칙을 준수하도록 수시 또는 정기적으로        교육을 시행하여야 한다.

라. 계약상대자는 시공품질에 대한 책임을 다하며 계약자 품질보증계획           서를 작성하여 품질담당부서에 제출하여야 한다.

9. 준공검사

가. 계약상대자는 단위공사 준공시 공사준공신고서를 시공부서에 제출하여        야 한다.

나. 준공신고서에는 준공물자기별조서, 준공도면, 공사비 변경명세서와 필요        시 매설물․은폐물 시공과정 및 시공완료 상태 등의 사진을 첨부하여         야 한다.

10. 하자보수 보증금 수남

가. 하자보수보증금 산출

단위공사 준공정산금액의  2%

나. 하자담보책임기간

단위공사 준공인수일로 부터  2년

다. 납부시기 및 방법

매단위 공사별 최종 대가지급시까지 납부하도록 하되 납부방법은 현금 또는 시행령 제37조 제2항의 보증서 등으로 납부하여야 한다.

다만, 계약체결시 추정계약금액에 대한 일괄 하자보수보증서를 제출한 업체는 매단위 공사별 하자보수보증금의 납부를 면제한다.

11. 사후관리

가. 공사품질 확보와 안전사고 예방 및 공정한 계약질서 확립을 위하여

계약기간중 회계규칙에 규정된 사항외에 다음에 따라 계약상대자를

제재 한다.

(1) 항목별 제재기준

제재내용 항 목	계약기간중 시공통보서 발행중지				중도해지
	5일	7일	10일	30일
1. 시공통보 이행불응		○			15회
2. 선시공지시 동원불응		○			10회
3. 선시공지시 동원지체	○				20회
4. 무단작업		○			15회
5. 고압고장 유발 (작업중 또는 공사하자로 고장발생)	순간	일시			일시 5회
6. 변대단위 저압고장 유발	○				-
7. 안전사고 발생	20점이상	30점이상	50점이상	100점이상	300점이상
8. 안전지적서 발행	○				15회
9. 공사 시정통보서 발행	○				15회
10. 불량 공사용 기자재 사용	○				15회
11. [별표3],[별표4]공사건별 공사시공품질 평가결과 분기별 누계 평균점수	90점미만	80점미만	70점미만	60점미만	50점미만
12. 공사의 하자 또는 작업자 과실로 인한 부실공사로 대외민원 유발	지방일간지 지방방송		중앙 일간지 중앙방송		5회

주1) 제재항목별 중도해지 조건은 연간 누계치 기준임

주2) 2이상 제재항목이 동시에 발생되었을 경우 가장 무거운 항목만 적용

주3) 상기 4항,5항,8항,9항,10항,12항은 단위공사 준공이후 지적시에도 동일적용

주4) 안전사고 발생시 제재기준은 안전담당부서의 사고조사에 대하여 특수

계약심의위원회가 심의한 결과 업체의 귀책사고로 판단하는 경우

적용하며, 제재점수는 아래와 같이 산정한 년간 누계치를 적용한다.

ㅇ 감전사고 : 사망(1회당 50점)  ㅇ 비감전사고 : 사망(1회당 30점)

중상(1회당 30점)                 중상(1회당 20점)

경상(1회당 15점)                  경상(1회당 10점)

(2) 조치방법

‘(1)’항 사항이 발생시 시공부서는 5일 이내에 [별표5] “협력업체 제재         사실 통보서”에 의거 위반사실을 확인하여 계약담당부서에 통보하여         야 하며 계약담당부서는 즉시 필요한 조치를 취하고 관리대장에 기록         하여 관리한다.

다만, 공사건별 공사 시공품질평가서는 공사시행 부서별로 분기실적을

집계하여 매 분기 종료 15일전까지 계약담당부서에 통보한다.

(3) 협력업체중 상기 (1)항에 의거 일정기간 시공통보서의 발행이 중지

될 경우 해당업체를 제외한 타업체에 시공통보토록 하며, 시공통보

방법은 6.다.(2)항에 따른다.

다만, 도서지역의 지역을 분할하여 운영하는 시공통보 방법은 6.다

(3)항에 따른다.

나. 공사 불량재료 사용 또는 부실시공으로 인한 선로고장 유발업체는           ‘가’와 병행하여 다음과 같이 사고배상금을 납부하도록 한다.

(1) 대  상

하자담보 기간내의 공사로서 다음의 부실시공으로 인하여 고장을

유발한 업체 또는 공사시공중(공사중지 포함)업체과실로 인하여

고장을 유발한 업체

(가) 전주근입 미달시공 (근가 미취부 포함)

(나) 전선접속 (압축포함) 시공불량

(다) 바인드 시공불량

(라) 전선이도 불량

(마) 각종 볼트류 시공불량

(바) 시공중 업체과실로 인한 정전사고 발생(고압고장만 적용)

(사) 기타 공법 미준수

(2) 선로고장 발생회수별 사고배상금 부과기준

구 분		배 상 금	비 고
고압선로 고장발생	일시고장	500만원	1회당
	순간고장	200만원	1회당
변대단위 저압고장 발생		100만원	1회당

다만, 고장의 경중에 따라 필요한 경우에는  사고배상금 부과와 병행하여 계약에 관련된 제재조치(중도해지, 부정당업체 제재)를 한다.

(3) 사고배상금 적용방법

(가) 항목이 동시에 2건이상 발생된 경우 고액항목 1개만 적용한다.

(나) 설비피해에 대한 손해금액은 별도로 납부하도록 하여야 한다.

(4) 조치 방법

(가) 사고배상금 부과사항 발생시 설비운영부장 (시공중 발생 사항은

시공부서장)은 5일이내에 발생 내용을 공사계약부서로 통보한다.

(나) 계약부서는 발생 빈도별 제재기준에 의거 다음과 같이 사고 배상              금의 수납을 위한 조치를 취하고 관리대장에 기록 관리한다.

ㅇ 해당 공사대금 지불시 공제

ㅇ 사고배상금을 부과하여야 할 사고가 공사비 지불후 발생된 경우              에는 발생월에 지불되는 공사비에서 공제

ㅇ 공사비 지불건이 없는 경우에는 해당업체로 하여금 입금하도록 조치

ㅇ 타 사업소관내 업체는 관할사업소에서 공제 및 납부

ㅇ 회계처리는 지체상금과 동일한 방법으로 처리

다. 협력업체 소속 기능인력 개별관리

(1) 공사 시공품질 확보와 안전사고 예방을 위하여 협력업체 소속 배전전         공 및 배전활선전공이 작업시행중 부실시공이나 안전사고 등을 유발         할 시에는 개인별 벌점을 부과하여 일정기간 공사참여를 제한하거나         기능자격을 취소한다.

(2) ‘(1)’항에 대한 세부사항은 ‘무정전배전공사 시공업체 관리기준’ 제38          조(기능인력 개별관리)의 관련조항에 따른다.

(3) 협력업체 대표자는 소속된 기능인력(현장대리인 포함)의 퇴사, 신규채  용 등 변동사항이 발생한 경우 ‘국민연금 전산정보자료 자격원부’를   첨부하여 변동사유 발생일로부터 5일 이내에 당사 해당사업소에 변경내역을 문서로 통보한다.

라. 협력업체 관리

불법 하도급공사를 근절하고 부실시공을 방지하기 위하여 협력업체의

하도급여부, 기능인력, 장비 및 현장사무소 보유현황을 아래와 같이 확        인한다.

(1) 확인책임자 : 기획관리실장 또는 기획관리담당 부서장

(2) 평가  반원 : 확인책임자가 지정한 자(2～3명)

(3) 실사  회수 : 반기 1회 (필요시 수시 시행)

(4) 점검  내용 : 협력업체 하도급여부, 기능인력, 장비 및 현장사무소 보유현황

(5) 사후  조치

○ 불법 하도급으로 판명될시 별도로 체결한 ‘배전공사 불법하도급

방지 협약서’에 의거 조치

○ 기능인력 및 장비 보유현황이 기준에 미달되거나 또는 해당사업소 관할구역안에 현장사무소를 두지 아니한 경우에는 즉시 해당업체에 통보하고, 기준에 적합할 때까지 시공지시 보류 조치

12. 협력업체종사자 교육실시 및 기능경기대회 개최

가. 이 기준에 의하여 계약체결된 협력업체의 종사자는 년1회 당사에서

실시하는 다음 교육에 참여하도록 한다.

(1) 교육대상 : 현장대리인 및 전공

(2) 교육시기 : 1/4분기내

(3) 교육주관 : 2차사업소 단위

(3) 교육내용

․ 관내 배전계통 및 선로현황,  고객응대 및 서비스 향상에 관한 사항

․ 안전작업수칙 준수 및 배전공사 시공품질 확보에 관한 사항 등

나. 협력업체는 상기 ‘가’항에 의한 교육이외에 당사 중앙교육원에서 시        행하는 직원 업무능력 향상교육에 참여할 수 있으며, 세부 시행방법        은 중앙교육원의 교육계획에 따른다.

(1) 교육대상 : 현장대리인 또는 전공장 (필요시 전공도 가능)

(2) 교육시기 : 계약기간중

(3) 교육주관 : 당사 중앙교육원

(4) 교육내용 : 신기술․신공법,  안전사고 예방 및 공사 시공품질에 관                       한 사항

다. 협력업체 기능인의 시공기술 향상과 업체평가를 위하여 연1회이상         1차사업소 단위의 기능 경기대회를 실시할 수 있으며,  대회 시행시

는 2 주일전에 기능평가 종목, 평가기준 및 평가방법등 세부내용을

사전 공시한다.

13. 무정전 심의위원회 구성 운영

가. 고압협력업체의 무정전공법 현장적용시 안전성 확보와 원활한 운영

을 위해 아래와 같이 무정전 심의위원회 (이하 `위원회'라 한다)를

구성 운영한다.

나. 심의위원회의 구성

(1) 설 치 : 1차사업소

(2) 구 성

ㅇ 위원장 : 1차사업소 배전운영 담당부장

ㅇ 위  원 : 1차 사업소 및 평가대상 업체 관할 사업소의  4직급 기술                      계 간부중 위원장이 임명한 3～4명

ㅇ 간  사 : 1차사업소 협력업체 관리 담당과장

(3) 임 무

ㅇ 무정전 배전공사 적격업체 심사 및 현장적용 실증평가

ㅇ 무정전공법 현장적용 및 시공기술 향상과 관련한 제반업무의 심의             결정

14. 기  타

가. 이 기준에 명기하지 않은 사항은 정부투자기관 회계규칙, 정부투자기관

회계기준, 회계기준시행세칙, 계약업무처리요령, 당사 공사관리규정 및

무정전배전공사 시공업체 관리기준 등에 따른다.

나. 배전공사와 관련하여 깨끗하고 투명한 업무수행으로 부조리를 방지하고

고 공정한 계약질서 확립을 통한 부실시공을 예방하기 위하여 발주자와

계약상대자간 “청렴계약특수조건” 및  “배전공사 불법하도급 방지협약”       을 체결, 운영한다.

다. 고압 및 저압협력업체는 재해 등 비상상황 발생시 신속한 대응과 단가계  약 공사의 효율적 수행을 위하여 계약체결이후 부터 계약기간까지는    해당사업소내 관할 구역안에 현장 사무소를 두어야 한다.

다만, 필요시 계약체결후 2개월까지 유예기간을 부여할 수 있다.

라. 계약기간중 발주자의 사업소 관할구역 조정으로 타 사업소 관할로 편입된 지역의 공사는 조정 후의 동 지역 관할사업소 단가계약 협력업체에서 시공한다.

마. 계약기간중 발주자의 사업소 조직 개편에 따라 기존의 사업소 관할구역을 조정하여 신설되는 경우 고압협력업체는 해당 사업소 및 기존 계약 업체간 도급액을 감안하여 조정(자율조정 또는 추첨 등에 의함)에 의하여 수행하며, 저압협력업체는 신설된 사업소에 별도 입찰방법을 통하여 추가 선정한다.

[별표 1]

고압협력업체 필수장비(공구) 확보기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

1. 일반 장비

품 명	단위	규격 및 용도	기준수량
접지저항 측정기	대	훅크온식 보조전극식 1대 포함	3
훅크온메타	대	전압, 전류 겸용	3
블록(연선로라)	개	ACSR용	30
절연저항 측정기	대	1,000V, 2,000㏁	2
		500V, 1,000㏁	2
로타리해머 (진동전기압축방식)	조	-	1
절단기	대	600㎟이상	2
시메라(장선기)	개	캄아롱부 1.0Ton이상	3
멀티테스터	대	-	2
COS조작봉	개	23kV용	3
접지용구	조	특고압용 (22㎟이상)	3
절연안전모	개		15
안전허리띠	조	로프부	12
다기능전압기록계	대	24시간연속 전압측적용	2
검전기	개	80V ～ 7kV	6
		3.3kV ～ 35kV(낚시대형)	3
투광기	대	차량용 포함(24W이상)	3
활 차	조	1.5Ton 이상	2
유압식압축기 (수동)	대	Y-35 (14～325㎟, 6각다이스)	1
전동식압축기 활선작업차 장착용 인정가능 충전식압축기 인정가능	대	Y-46 (14～325㎟, 6각다이스) 충전식 압축기는 KB-135 동등이상	3

품 명	단위	규격 및 용도	기준수량
전선압축기의 압축력시험기	대	Y-35, Y-46, KB-135 겸용	1
전선피박기	개	58,95,160㎟용 각 3셋트 (또는32-160㎟용)	9
활선접근경보기	개	고압, 특고압 겸용	10
유압식 절단기 (활선작업차 장착용인정가능)	대	ACSR, CU32-160㎟용	2
휴즈압착기	대	2.6㎜～3.2㎜ (저압2.6㎜～22㎟)	5
공사용 차량	대	3.5톤이상 트럭 (카고크레인 장착)	1
		오가크레인 또는 백호(포크레인)	1

주) 오가크레인 또는 백호는 임대사용 가능 (단, 영업용 차량에 한하여 계약기간

동안 임대하여야 하며, 동일차량의 중복임대는 불가)

2. 안전 장구

번호	품 명	규 격	기준수량
1-1	전선 카바	25kV, 5'	18
1-2	애자 카바	25kV, 9" HEIGHT	12
1-3	완금 카바	46kV	4
1-4	COS 카바	15kV	6
1-5	데드엔드 카바	25kV	12
1-6	전주 카바	72"	3
1-7	라인 호스	1" 23kV급	9
1-8	고무 브랑켓트	30kV급, 6“×36”	12
1-9	방전고무장갑	30kV급	6
1-10	고무소매 또는 절연조끼	30kV급	6
1-11	애자후드	25kV이상	2
1-12	방염복		2

3. 활선 공구

번호	품 명		규 격	기준수량
3-1	활선압축기		HY-35 (유압식)	1
3-2	전선카터		라쳇트형 또는 유압식	2
3-3	활선피박기		58～160㎟(Set)	1
3-4	활선작업용 COS		25kV(점퍼케이블 크램프 포함)	3
3-5	클램프핀	직 구		12
3-6		곡 구		12
3-7	활선용 장선기 (장선기링크스틱 포함)		23 kV급 1,000kg.f (벨트식)	4
3-8	바이패스 점퍼스틱 또는 바이패스점퍼케이블		23kV급, 400A	3
3-9	바이패스점퍼지지대		23kV급 (임시걸이 3개 포함)	6
3-10	충전부 임시절연캡		잠바선, 변압기 인하선 절단시 충전부 절연용	15개
3-11	가공지선 홀딩스틱		가공지선 활선설치장구 (FRP소재, 굴절식)	4개
3-12	텐셔너 (접지롤러 포함)		가공지선 가선중 장력 조절 기능, 제동장치 보유	1대

주)  3-11 가공지선 홀딩스틱 및 3-12텐셔너는 지사직할 및 1급지점 소재 업체에 해당

주) 3-17 텐셔너는 2개업체간 공동사용 가능

4. 활선 작업차

번 호	품 명	규 격	기준수량	비 고
4-1	활선작업차	작업높이 15M 이상	1	절연바켓트럭, Aerial Lift와 동일품목

주) 활선작업차는 임대사용 가능 (단, 영업용 차량에 한하여 계약기간 동안

임대하여야 하며, 동일차량의 중복임대는 불가)

5. 무정전 장비

순번	품 명	규격 및 용도	기준수량
1	바이패스 케이블차 또는 장치	․ 22.9kV-y 3상4선식 배전선로 바이패스 케이블 운반, 포설용 - 원격(배전반) 조작 가능 - 케이블 얽힘 방지장치 부 - 3상동시 케이블감기, 풀기 기능	1대 이상
2	이동용 변압기차 또는 장치	․ 단상 100kVA 3대동시 교체 가능 - 22.9kV-y / 380-220V - 결상 등 검상장치 부 - 1차접속용 바이패스케이블 22㎟ 15m이상 1조(3선)이상 - 접지용저압케이블 22㎟, 15m이상 - 1,2차 개폐기부(배전반조작 가능) - 저압접속용 케이블(중선선포함) 2중 절연 100㎟, 20m이상 1조 (4선)	1대 이상
3	특고압용 검상기	바이패스케이블 및 2단장주에서 상하단 검상용	1대
4	특고압 전류계	22.9kV-y 배전선로 부하측정용	1대
5	저압용 검상기	저압케이블 검상용	1대

주) 바이패스케이블차, 이동용 변압기차는 임대사용 가능 (단, 영업용 차량에

한하여 계약기간 동안 임대하여야 하며, 동일차량의 중복임대는 불가)

순번	품 명	규격 및 용도	기준수량
6	바이패스케이블	22.9kV-y3상4선식 배전선로 에서 200m이상 바이패스 가능	1Set이상
	6.1 단말케이블 6.2 중간케이블 6.3 분기케이블 6.4 개폐기접속 케이블 6.5 지상기기 연결용 엘보케이블 6.6 직선접속재 6.7 분기접속재 6.8 가지지크리트 6.9 공사용개폐기 6.10 케이블인류 크램프 6.11전주체부밴드 6.12 직선접속재 보호상자 6.13 분기접속재 보호상자 6.14 부품수납 상자 6.15 여유장처리 금구 6.16 케이블 프로텍터	38㎟ 15m이상 (상구분 색별 띠표시) 38㎟ 50m이상 (상구분 색별 띠표시) 38㎟ 15m이상 (상구분 색별 띠표시) 38㎟ 50m이상 (상구분 색별 띠표시) 38㎟ 15m이상 (상구분 색별 띠표시) 중간케이블 접속용 분기케이블 접속용(T분기) 케이블입상 지지용 바이패스 선로 개폐용 (검상기능부) 바이패스케이블 지지용 바이패스케이블 지지용 직선접속재 보호용(3상용) 분기접속재 보호용(3상용) 케이블 릴(로라) 수납용 케이블 여유장 처리용 케이블지상포설시 압축, 충격보호용	2조(3상기준) 4조(3상기준) 2조(3상기준) 2조(3상기준) 2조(3상기준) 15개 6개 4개 3개 30개 10개 6개 3개 2개 3개 8개

※ 6.5 지상기기연결용 엘보케이블은 지상기기(변압기 + 개폐기) 50대이상 보유

사업소의 협력업체에 한함

순번	품 명	규격 및 용도	기준수량
7	전선이선기구	22.9kV-y3상4선식 배전선로에서 200m이상 무정전작업 가능	1Set이상
	7.1 LP상부연선로라	․가로×세로×높이×중량 = 150×210×190mm×5kg ․LP애자 상부에 취부 ․활선, 사선 모두사용	9개
	7.2 완금연장보조암	․길이×무게×인장하중 = 750mm×8.1kg×1.8t ․ 기존완금 연장용으로 핀장주 및 내장주 공용	10개
	7.3 매직암	․내장주(장력개소) 전선이선 ․360˚회전가능	2개
	7.4 핀장주 전선이선로라	․핀장주 전선을 이선 ․좌,우,수직 3단계 회전가능	8개
	7.5 핀장주취부형 고정장치	․길이×무게 = 340mm×7kg ․취부후 완금연장 보조암과 혼합사용	3개
	7.6 내장주취부형 고정장치	․길이×무게 = 360mm×9kg ․취부후 매직암과 조합사용	2개
	7.7 스페이스 로라 (전선 간격유지구)	․가로×세로×무게 = 50×20×mm×0.8kg ․전선연선, 철거시 혼촉 우려개소 사용	2개
	7.8 케이블 및 점퍼선 임시걸이	․길이×무게 = 550mm×2kg	2개
	7.9 쉐벨기능 전선클립	․길이×무게 = 205mm×1.4kg ․전선클립과 쉐벨기능을 일체화 ․전선규격(58～240㎟)별 사용	3개
	7.10 3링 연선로라	․넓이×높이×무게 = 310×370mm×5kg ․전선연선시 곡률반경 확대	2개

주) 무정전장비중 순번1 바이패스케이블차(또는 장치) + 순번6 바이패스케이블

(부속공구 포함) 또는 순번7 전선이선기구 중에서 1가지를 선택하여

확보가능

7. 지중공사용 장비

품 명	단위	규격 및 용도	보유 기준		비 고
			A	B
양수기	대	엔진식 5HP	1	-
연선로라	대	케이블 포설용	10	-	가공용과 별도
윈치	대	7.5T	1	-	케이블 인입용
케이블절단기	대	600㎜이상(전동식)	1	1	원방조작식
관로 도통시험기	대	400㎜(관로규격별1대)	5	5
장력계	대	7.5T	1	-
케이블드럼받침대	대	유압식	3	-
가스탐지기	대	유독성, 가연성가스	1	1
용량성검전기	개	AC 5～35kV	1	1
접지엘보	개	370 GLR	6	6
검전핀	개	370 TR	4	4
조작핀	대	600-AT (토오크 조정장치 부착)	2	1
플레이트컴팩터	대	엔진식 1.5T	1	-	다짐기
콘크리트 진동봉	대	(3.5HP, 45￠)	1	-
콘크리트 드릴	대	지상기기 고정용	1	-
안전칸막이	개		20	10
공사안내판	개		2	1
라바콘	개		20	10
매설물탐지기	대	굴착시 지하매설물 탐지용	1	-
맨홀뚜껑개방기	개		1	1
가스제거기	대		1	1
지상기기용 상측정기	대	고압활선부 비접촉식 (엘보접촉식)	1	1
절연캡	개	지상개폐기 붓싱절연	6	6

주) A : 지상기기(변압기 + 개폐기) 500대이상 보유사업소내 협력업체

B : 지상기기(변압기 + 개폐기) 10대이상 500대미만 보유사업소내 협력업체

권고 장비

번호	품 명		단위	권고수량	비 고
1	와이어통, 핸드라인훜, 1륜활차, 2륜활차, 로프포박 브라켓, 가완목, 인성쇄클, 캄아롱		조	각1	활선 간접작업시 활용
2	주상작업 발판대		개	1	”
3	윈치작기		대	1
4	불량애자 검출기		대	1	불량애자 검출작업시 활용
5	활선애자 청소기	본 체	조	1	활선 애자청소 작업시 활용 주수간 및 호스는 접지선이 내장된것
		수저항측정기
		절연 측정기
6	활선작업용 텐션 미터		개	1
7	활선스틱 공구 (링크스틱헤드, 바인드스틱 헤드 애자포크, 코터기제거기 볼소켓 조절기, 핀홀더 코터기 취부기, 조정핀, 함마 코터기 풀러, COS용 플라이어, 롤러링크스틱, 와이어통 새들엔드타이트너, 활선바이스 크립, 폴탑카바, 와이어통, 새들엔 드타이트너, 유니버셜폴, 그립프 올크램프스틱, 와이어홀딩스틱),		개	각 1	와이어통, 새들엔드타이 트너, 유니버셜폴, 그립프 올크램프스틱, 와이어홀딩 스틱은 필수품목에서 추가 전환
8	유압식 압축기 (100 Ton)		대	1	장경간 압축인류크램프 접속시 필요
9	저압발전기차 - 380-220V, 100kVA이상 - 결상 등 검상장치부 - 주(보조)전원 케이블100㎟ 이상		대	1
10	절연안전모 부착형 무전기		대	4	작업중 무선연락 가능
11	휴대용 변압기테스터기		대	1	변압기 내부점검 필요
12	절연장화		족	4	바켓트럭내 2중절연 목적
13	저압수용가 탐사장치		대	1	지중선용 신개발품목
14	지중저압계통 탐지기		대	1	“
15	콘크리트 커터		대	1	"
16	알미늄 브러쉬		개	10	필수품목에서 전환

[별표 2]

저압협력업체 필수장비(공구)확보기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

품 명	단위	규격 및 용도	기준수량
			A	B	C
유압식 공구	개	압착단자 14㎟-150㎟	1	1	1
접지저항 측정기	대	훅크온식	3	3	2
훅크온메타	대	전압, 전류 겸용	5	4	3
절연저항 측정기	대	1,000V, 2,000㏁	2	1	1
		500V, 1,000㏁	3	2	2
전기드릴	대	100V 또는 220V 1/4마력	1	1	1
로타리해머 (진동전기압축방식)	조	-	1	1	1
절단기	대	600mm이상	3	2	2
시메라(장선기)	개	캄아롱부 1.0Ton이상	2	2	2
멀티테스터	대	-	3	3	2
COS조작봉	개	23kV용	1	1	1
절연안전모	개		12	10	8
안전허리띠	조	로프부	12	10	8
방전고무장갑	족	고압용 (600V급)	3	2	2
보호용가죽장갑	족	고압용	3	2	2
검전기	개	80V - 7kV	2	2	1
		3.0kV-35kV (낚시대형)	3	3	2
투광기	대	차량용 포함	4	3	3
유압식압축기(수동)	대	Y-35	2	2	1
휴즈압착기	대	2.6mm-22㎟	6	6	5
누점점 탐지기	대	활선용 (옥내배선 탐지기능 겸용)	1	1	0
		사선용 (옥내배선 탐지기능 겸용)	1	1	1
활선접근경보기	대	고압, 특고압 겸용	3	3	2
공사용 차량	대	1 톤이상 트럭	1	1	1

주) A : 추정도급액 8억원이상 사업소 협력업체

B : 추정도급액 4억원이상 8억원미만 사업소 협력업체

C : 추정도급액 4억원미만 사업소 협력업체

[별표 3]

공사시공 품질 평가서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

[고압협력업체]

결재	시공부서
	과 장	부 장

○ 계약번호 및 일자 :

○ 공사번호 :

○ 공 사 명 :

○ 업 체 명 :

(대표자 :            )

NO	항 목		평 가 기 준		감 점	근 거
1	현장대리인 미상주		1회당 50점 감점
2	안전지적서 발행		1회당 30점 감점
3	도로변 작업중 교통안전원 미배치		1회당 30점 감점
4	전주근입 미달 또는 근가 미시공		1개소당 50점 감점
5	전선공사시 연선로라 미사용		1회당 50점 감점
6	타시설물, 수목 등과 이격거리 미달		1개소당 30점 감점
7	압축접속 불량(접속공법 미준수 포함) 케이블접속교육 미이수자 접속시공		1개소당 50점 감점
8	전선이도 불량 (2단장주 완철간격 부적정)		1개소당 30점 감점
9	접지시공 불량(접지저항 미달 포함)		1개소당 50점 감점
10	변압기 또는 전선 오결선		1개소당 30점 감점
11	안전칸막이, 공사안내판 등 안전 시설물 미설치 또는 부적합		1개소당 30점 감점
12	전주 등 잔자재 현장방치 및 잔토 미처리		1회당 50점 감점
13	사급자재 손망실		1건당 50점 감점
14	자격수첩(활선, 케이블접속)미휴대		1회당 30점 감점
15	공사준공기일 지체		1일당 30점 감점
계		배 점	100점	감 점	점	평 점

① 공사건당 100점을 기준하여 현장감리(감독), 준공검사, 간부 현장순시시 등

지적된 항목을 기준으로 평가하되 하한치는 0점

② 업체제재 항목 해당시는 기준에 의한 제재조치 병행

작성일자 : 200  .   .   .

작 성 자 :            (인)

[별표 4]

공사시공 품질 평가서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

[저압협력업체]

결재	시공부서
	과 장	부 장

○ 계약번호 및 일자 :

○ 공사번호 :

○ 공 사 명 :

○ 업 체 명 :

(대표자 :                 )

NO	항 목		평 가 기 준		감 점	근 거
1	시공통보이행 불응, 무단작업		1회당 50점 감점
2	계기 오결선, 시험용단자 미접속		1명당 50점 감점
3	현장대리인 미상주		1회당 20점 감점
4	안전지적서, 시정통보서 발행		1회당 30점 감점
5	계기지침 등 전산사항 입력누락 또는 착오입력		1건당 30점 감점
6	봉인불량 수용발생(미봉인, 탈락)		1개소당 50점 감점
7	시공불량으로 인한 인입선 접속 상태 불량		1개소당 30점 감점
8	이상전압 발생		1건당 30점 감점
9	접지저항 또는 절연저항 측정 등 누락		1개소당 30점 감점
10	민원 발생		1건당 50점 감점
11	사급자재 손망실		1건당 50점 감점
12	공사준공기일 지체		1일당 30점 감점
계		배 점	100점	감 점	점	평 점

① 공사건당 100점을 기준하여 현장감독, 준공검사, 간부 현장순시시 등 지적된

항목을 기준으로 평가하되 하한치는 0점

② 업체제재 항목 해당시는 기준에 의한 제재조치 병행

작성일자 : 200  .    .     .

작 성 자 :              (인)

[별표 5]

협력업체 제재사실 통보서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

결재	시공부서
	과 장	부 장

○ 계약번호 및 일자 :

○ 공사번호 :

○ 공 사 명 :

○ 업 체 명 :

(제재사실)

1. 발생일시 :  200   년    월    일  (    시     분경)

2. 공사장소 :

3. 위반내용 :

○ 관련규정 : 배전공사 협력업체 업무처리기준 11(사후관리).가.(1)의   항

4. 제재내용

○ 시공통보서 발행중지     일

○ 사고배상금 부과         원

상기 공사를 시공함에 있어 위와 같은 위반사실이 있음을 확인하며

이에 서명 날인합니다.

200  년     월     일

시공업체 대표자    성  명 :           (인)

현장대리인         성  명 :           (인)

※ 위반사실 적발경위 (간략히)

작 성 자  :  소 속          성 명

※ 계약부서 담당자  :           (인)

[별표 6]

고압협력업체 종합 평가기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

구 분	항 목	적 용 대 상			평 점	상한치
1.시공 능력	1) 기계화 장비보유	오가크레인, 바켓트럭, 포크레인, 무정전장비 (변압기차, 케이블차)			대당 50점	200
	2) 상근전공 보유	6개월 이상 고용		활선전공	1명당 25점	200
				배전전공	1명당 15점
		3개월 이상 고용		활선전공	1명당 20점
				배전전공	1명당 15점
		3개월 미만 고용		활선전공	1명당 10점
				배전전공	1명당 5점
	3) 시공능력 평가액	법령에 의해 공고된 최근실적 기준 (한국전기공사협회 발행)			1억원당 7점	100
2.공사 시공 품질	4) 연간 공사건별 공사 시공품질 평가	누계평점÷공사시공총건수 (공사건별 평가서 작성종합)			평균평점 500점 만점으로 환산	500
3.공사 시공 관리	5) 안전사고발생 (업체귀책사고에 한함)	사 망 사 고	감전사고		1회당 -20점
			비감전사고		1회당 -10점
		중 상 사 고	감전사고		1회당 -10점
			비감전사고		1회당 -5점
		경 상 사 고	감전사고		1회당 -5점
			비감전사고		1회당 -2점
	6) 계약기간중 부실 공사 지적 (공사 기 준공분도 해당)	부실시공으로 공사 시정 통보서 발행회수			1회당 -10점
	7) 공사중 고압정전 유발	일시정전 유발			1회당 -10점
		순간정전 유발			1회당 -5점
	8) 공사후 하자로 고압선로고장 발생	일시정전 유발			1회당 -10점
		순간정전 유발			1회당 -5점

구 분	항 목	적 용 대 상	평 점	상한치
4. 민원 (부조리) 유발	9) 협력업체의 소 송 등 민원제기	단가계약 입찰과 관련하여또는 계약이행중 업체대표자나 종사원이 당사를 상대로 부당한 소송, 민원제기 등	1회당 -150점
	10) 공사시공 관련 고객민원 발생	(익명민원 제외)	1회당 -30점
	11) 공사수행 관련 금품수수 등 부조리 발생	․검찰, 경찰 등 대외조사 결과 당사직원이 형사 입건후 구속된 경우 ․당사 직원이 감사원 등 대외기관에 지적되어 인사조치 (경고 이상)된 경우	1회당 -150점
		․본사 감사실의 조사결과 인사조치 (경고이상)된 경우	1회당 -100점
5. 공사비 절 감 기여도	12) 단가입찰 낙찰율 에 의한 평가	낙찰율 89.25% 대비 증가%p에 의한 평가	0.1%p증가시 마다 - 10점
6. 기 타	13) 전기공사 관련 수상경력	건설인상 수상업체	30점 가점
		한국전기공사협회 주관 기능경기대회 외선 또는 지중분야 최우수 수상업체	20점 가점
		1차사업소장 주관 기능 경기대회 최우수 수상 업체	10점 가점
		한전사장 감사패 수상업체	10점 가점
	14) 공사품질관리	ISO인증 업체	10점 가점
	15) 공사관련 면허 보유	조경면허 또는 통신면허 겸업업체	20점 가점
합 계				1000

※ 9) 협력업체의 소송 등 민원제기중 ‘소송’은 해당기관의 1심에서 당사 승소 또는 혐의사실 없음으로 판정될 경우 적용하고, ‘민원’은 당사에서 변호사 법률질의 또는 유관기관에 확인한 결과 당사의 혐의사실이 없는 것으로 판명될 경우 적용

※ 11) 공사수행 관련 금품수수 등 부조리 발생 항목의 검찰, 경찰 등 대외 조사

결과 당사 직원이 형사 입건후 구속된 경우라 함은 형확정 판결결과에 관계없이

형사입건 구속된 것 만으로 적용함

[별표 7]

저압협력업체 종합 평가기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

구 분	항 목	적 용 대 상		평 점	상한치
1.시공 능력	1) 장비(공구)보유	공사용 차량		대당 200점	200
	2) 상근전공 보유	일반전공 6개월이상 고용		1명당 50점	200
		일반전공 3개월이상 고용		1명당 40점
		일반전공 3개월미만 고용		1명당 30점
	3) 시공능력 평가액	법령에 의해 공고된 최근실적 기준 (한국전기공사협회 발행)		1억원당 20점	100
2.공사 시공 품질	4) 연간 공사건별 공사 시공품질 평가	누계평점÷공사시공총건수 (공사건별 평가서 작성종합)		평균평점 500점 만점으로 환산	500
3.공사 시공 관리	5) 안전사고발생 (업체귀책사고에 한함)	사망 사고	감전사고	1회당 -20점
			비감전사고	1회당 -10점
		중상 사고	감전사고	1회당 -10점
			비감전사고	1회당 -5점
		경상 사고	감전사고	1회당 -5점
			비감전사고	1회당 -2점
	6) 계약기간중 부실 공사 지적 (공사 기 준공분도 해당)	부실시공으로 시정통보서 발행		1회당 -10점
	7) 공사중 고압정전 유발	일시정전 유발		1회당 -10점
		순간정정 유발		1회당 -5점
	8) 공사후 하자로 고압선로고장 발생	일시정전 유발		1회당 -10점
		순간정전 유발		1회당 -5점

구 분	항 목	적 용 대 상	평 점	상한치
4. 민원 (부조리) 유발	9) 협력업체의 소송 등 민원제기	단가계약 입찰과 관련하여또는 계약이행중 업체대표자나 종사원이 당사를 상대로 부당한 소송, 민원제기 등	1회당 -150점
	10) 공사시공 관련 고객민원 발생	(익명민원 제외)	1회당 -30점
	11) 공사수행 관련 금품수수 등 부조리 발생	․검찰, 경찰 등 대외 조사 결과 당사 직원이 형사입 건후 구속된 경우 ․당사 직원이 감사원 등 대외 기관에 지적되어 인사조치(경고 이상)된 경우	1회당 -150점
		․본사 감사실의 조사결과 인사조치 (경고이상)된 경우	1회당 -100점
5. 공사비 절감의 기여도	12) 낙찰율에 의한 평가	낙찰율 89.25% 대비 증가%p에 의한 평가	0.1%p증가시 마다 -10점
6. 기 타	13) 전기공사 관련 수상경력	건설인상 수상업체	30점 가점
		한국전기공사협회 주관 기능 경기대회 외선, 내선 또는 지중분야 최우수 수상업체	20점 가점
		1차사업소장 주관 기능 경기대회 최우수 수상 업체	10점 가점
		한전사장 감사패 수상업체	10점 가점
	14) 공사품질관리	ISO인증 업체	20점 가점
	15) 공사관련 면허 보유	조경면허 또는 통신면허 겸업업체	30점 가점
합 계				1000

※ 9) 협력업체의 소송 등 민원제기중 ‘소송’은 해당기관의 1심에서 당사 승소 또는 혐의사실 없음으로 판정될 경우 적용하고, ‘민원’은 당사에서 변호사 법률질의 또는 유관기관에 확인한 결과 당사의 혐의사실이 없는 것으로 판명될 경우 적용

※ 11) 공사수행 관련 금품수수 등 부조리 발생 항목의 검찰, 경찰 등 대외 조사

결과 당사 직원이 형사 입건후 구속된 경우라 함은 형확정 판결결과에 관계없이

형사입건 구속된 것 만으로 적용함

[별표 8]

협력업체 종합평가서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

[고압, 저압 협력업체]

1. 업체명 :                    (담당지역 :                )

2. 대표자 :

3. 평가결과  (평가기간 :   년   월   일 ～    년   월  일)

구 분	1. 시공능력			2. 공사시공 품질		3. 공사시공관리
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
단 위	대	명	억원	누계평점	총건수	점	점	점	점
실 적
평 점

구 분	4. 민원(부조리)유발			5. 공사비 절 감 기여도	6. 기 타 (가점)			비 고	종 합 평 점
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
단 위	회	회	회	점	점	점	점
실 적
평 점

위 평가내용을 확인하고 서명 날인함.

위원장(사업소장) :              (인)

부  위  원   장  :               (인)

위   원  :              (인)     위   원 :                 (인)

위   원  :              (인)     위   원 :                 (인)

위   원  :              (인)     위   원 :                 (인)

주 1) 평가위원은 해당사업소 특수계약 심의위원회 위원으로 한다.

주 2) 종합평가는 계약기간이 종료되는 해의 12월 15일 이후에 실시한다.

[별표 9]

중점지사(지점) 및 관리사업소 명부

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

중점지사(지점)명	관리 사업소	비 고
서울지역본부	서울특별시에 주소를 둔 사업소
경기지사	경기도에 주소를 둔 사업소
인천지사	인천광역시에 주소를 둔 사업소
강원지사	강원도에 주소를 둔 사업소
충북지사	충청북도에 주소를 둔 사업소
충남지사	충청남도에 주소를 둔 사업소
서대전지점	대전광역시에 주소를 둔 사업소
전북지사	전라북도에 주소를 둔 사업소
전남지사	전라남도에 주소를 둔 사업소
서광주지점	광주광역시에 주소를 둔 사업소
경남지사	경상남도에 주소를 둔 사업소
경북지사	경상북도에 주소를 둔 사업소
대구지사	대구광역시에 주소를 둔 사업소
부산지사	부산광역시에 주소를 둔 사업소
울산지점	울산광역시에 주소를 둔 사업소
제주지사	제주도에 주소를 둔 사업소

[별표 10]

적격심사 결과표

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

공   사   명 :

관리사업소명 :

담   당   자 :                (전화번호 :         )

순위	상호	대표자	주소	적격심사 득점	비고

작 성 자(과장) :         (인)

확 인 자(부장) :         (인)

[별표 11]

배전공사단가계약 낙찰예정자 결정순번

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

□ 중점지사(지점)명 :

순번	입찰대상공사	관리사업소명
01	○○지사 직할 고압단가 A 공사	○○지사 직할
02	○○지사 직할 고압단가 B 공사	○○지사 직할
03	○○지사 직할 고압단가 C 공사	○○지사 직할
04	△△지점 고압단가 A 공사	△△지점
05	△△지점 고압단가 B 공사	△△지점
06	☆☆지점 고압단가 A 공사	☆☆지점
07	☆☆지점 고압단가 B 공사	☆☆지점
08	○○지사 직할 저압단가 공사	○○지사 직할
09	△△지점 저압단가 공사	△△지점
10	☆☆지점 저압단가 공사	☆☆지점
11
12
13
14
15
16