[본  사]

구매 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사업명 : 영흥화력 #3,4(보조기기/기계)                        (단위 : 백만원, VAT 제외)

건 명	개 요	예산액	납품기한	발주 예정월	발주 사업소
일반 및 대형 주강밸브	복수, 추기, 기기냉각수 등 전계통에서 쓰이는 구경 65이상의 밸브	1,732	‘06.03.31 ～‘06.7.31	‘05.03	본 사
고온고압 주강 밸브	Main Steam, 급수계통의 급수펌프출구 ~ Eco Inlet 까지의 계통에 쓰이는 밸브(구경50이하)	2,185	‘06.03.31 ～‘06.7.31	‘05.03	“
접형밸브	주로 해수계통에 쓰이는 밸브	1,194	‘06.04.30 ～‘06.8.31	‘05.03	“
고온고압 단조 밸브	Main Steam, 급수계통의 급수펌프출구 ~ Eco Inlet 까지의 계통에 쓰이는 밸브(구경 65이상)	211	‘06.03.31 ～‘06.7.31	‘05.03	“
회처리설비	발전소에서 생성되는 각종 회(Ash)를 처리하는 설비	36,852	‘06.04.30 ～‘06.11.30	‘05.03	“
크레인	터빈건물내의 중량물을 권양 하는 설비	430	‘05.11.30	‘05.03	“
탈질설비	발전소 운영중 발생되는 배기가스 성분중 NOx를 저감시키는 설비	27,398	‘06.01.31 ～‘07.11.30	‘05.02	“
폐수처리설비	발전소 운영중 발생하는 발전폐수를 처리하여 재이용 하는 설비	1,874	‘06.03.31 ～‘06.12.31	‘05.04	“
탈황설비	발전소 운영중 발생되는 배기가스 성분중 SOx 저감 설비	113,257	‘05.09.30 ～‘07.07.31	‘05.03	“
수처리설비 및 염소주입설비	물리,화학적 처리과정을 통해 발전소에서 사용되는 원수, 순수 등의 물을 만드는 설비	18,280	‘05.09.30 ～‘07.06.30	‘05.03	“
공기압축기	발전소내 계통내 기계 및 계측설비에 필요한 압축공기를 생성,공급하는 설비	1,458	‘06.04.30 ～‘06.06.30	‘05.02	“
공기조화설비	발전소의 각 설비에 적절한 온도를 유지시켜 장비를 보호하게끔 하는 설비	3,309	‘05.11.30 ～‘06.04.30	‘05.05	“

* 발주예정월은 ITB 발급 기준

구매 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사업명 : 영흥화력 #3,4(보조기기/전기)                        (단위 : 백만원, VAT 제외)

건 명	개 요	예산액	납품기한	발주 예정월	발주 사업소
전력용변압기	주변압기, 보조변압기, 연계변압기	14,853	‘07.05	‘05.04	본 사
발전기모선	자연냉각식	3,498	‘07.05	‘05.04	“
축전지	4000AH(250V) 2200AH(125V)	283	‘06.04	‘05.02	“
345&154kV 특고압케이블	XLPE Cable	7,593	'06.04	'05.03	“
비상발전기	2000kW	828	'07.01	'05.04	“
케이블트레이	케이블트레이	800	‘05.06	‘05.05	“
조명용등기구	방전등	600	‘05.12	‘05.11	“
전력용케이블	600㎟이상 500㎟이하	6,000	‘05.12	‘05.11	“
제어용케이블	제어용, 계측용, 신호용	3,000	‘05.12	‘05.11	“
전기방식설비	알루미늄양극 외부전원방식(무선방식)	740	‘05.12	‘05.11	“

* 발주예정월은 ITB 발급 기준

구매 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사업별 : 영흥#3,4(보조기기/계측제어)                         (단위 : 백만원, VAT 제외)

건 명	개 요	예산액	납품기한	발주 예정월	발주 사업소
수질분석설비	보일러 계통수 분석용 기기	990	6개월	’05.01	본 사
고온고압제어 밸브	#1,500 초과급 제어밸브류	1674	6개월	‘05.03	“
실험실기기	화학실험실용 기자재	1261		‘05.06	“
전기계측시험 기기	전기 및 제어 시험기자재	688		‘05.06	“
일반제어밸브	#1,500 이하급 제어밸브류	576	6개월	‘05.03	“
현장계기	압력 및 온도 계기류	858	6개월	‘05.02	“
레벨계기	수위 및 유량 계기류	616	6개월	‘05.02	“
가스분석설비	연돌가스 분석용 기기	252	6개월	‘05.05	“
튜브누설감시 설비	보일러 튜브 누설 감시기기	633	6개월	‘05.05	“

* 발주예정월은 ITB 발급 기준

구매 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

기타사업                                                    (단위 : 백만원, VAT 제외)

건 명	개 요	예산액	납품기한		발주 예정월		발주 사업소
삼천포 100KWP 태양광 발전시스템 신규설치	ESCO사업	1,700	‘05.10		‘05.02		본 사
삼천포 자연채광 조명 시설 설치	ESCO사업	300	‘05.12		연중		“
삼천포 소수력 발전기 설치공사	ESCO사업	3,600	‘05.12		‘05.04		“
삼천포 노내화염 감시 설비 설치	제어설비보강	300	‘05.06		‘05.03		“
영흥 노내화염 감시 설비 설치	제어설비보강	300	‘05.06		‘05.03		“
삼천포 발전기술원 운전 지원 시스템 구축	제어설비보강	800	‘05.07		‘05.04		“
영동 발전기술원 운전 지원 시스템 구축	제어설비보강	700	‘05.07		‘05.04		“
여수 발전기술원 운전 지원 시스템 구축	제어설비보강	700	‘05.07		‘05.04		“
삼천포 3,4호기 터빈성능 진단시스템 구축	제어설비보강	300	‘05.11		‘05.09		“
삼천포 BLR 튜브 진단 장비 구입	수화력공구 및 계측기	800	‘05.09		‘05.05		“
전문원실 계측기	수화력공구 및 계측기	100	1차	‘05.03	1차	‘05.02	“
			2차	‘05.10	2차	‘05.06
OA기기 구매	PC 및 프린터 교체	868	45일		‘05.02		“
전산서버 구매	노후 서버 2식 교체	350	45일		‘05.06		“
디스크장치 증설	DISK 증설	250	45일		‘05.07		“
유선 페이지폰 원격 관리시스템 도입	삼천포 NMS 형 폰 구매	110	40일		‘05.07		“

공사 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

공 사 명	공사개요	예산액	공사기간	발주 예정월	발주 사업소
예천양수 345kV 송전선로 건설공사	345kV 송전선로 및 가공지선 설치	15,000	‘05.4-’10.4	‘05.02	본 사
영흥화력 사택신축공사	13평 48세대	4,250	‘05.3-’06.4	‘05.03	“
영흥화력 홍보관 신축공사	부지 면적 : 16,500평 홍보관 면적 : 1,500평	18,600	‘05.7-’07.1	‘05.07	“
‘05년도 수화력발전소 경상정비공사	경상정비	33,000	1년	년중	“

용역 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

용 역 명	용역개요	예산액	용역기간	발주 예정월	발주 사업소
영흥화력 #3,4 비파괴 용역	용접부위 건전성 확인을 위한 검사 용역	3,023	‘05.08 ~‘08.06	‘05.03	본 사
여수 석탄 연료전환 (유동층)공사	연료전환설비 사전용역	1,000	10개월	’05.03	“
비주력업무운전 및 정비위탁 용역	비주력설비에대한 운전 및 정비	15,934	1년	‘05.03	“
계측제어분야 경상 정비위탁 용역	제어 비핵심분야 정비	8,819	3년	‘05.09	“
삼천포#1,2 수명평가 및 수명연장 타당성 조사 용역	수명평가	500	1년	‘05.04	“
터빈, 발전기 원격 진단기술용역	주요 회전기기 전문가 원격진단시행	150	1년	‘05.03	“
e-P&ID 시스템 개발	전자도면관리	150	6개월	‘05.03	“
정보화전략계획(ISP)	정보화 마스타 플랜 수립	380	4개월	‘05.03	“
영흥화력 설비관리 시스템 구축	발전설비 정비관리	900	12개월	‘05.08	“
정보통신설비 유지 보수 위탁 용역	본사 설비 및 사업소 서버	370	24개월	’05.10	“

[삼천포화력본부]

구매 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

건 명	개 요	예산액	납품기한	발주 예정월	발주 사업소
행정동 및 2발 사무동 냉동기 구매	60R/T : 4대	114	4개월	‘05.02	삼천포화력
#1 HPU System 제작	HPU System 제작, 설치, 시운전 포함(Actuator 제외)	500	‘05.08	‘05.03	“
#1 IP TBN 1단 Diaphragm 제작	예비품 확보하여 O/H 및 돌발 복구용으로 활용	280	‘05.08	‘05.03	“
#1 Water Box Priming PP 및 Condenser Vacuum PP 제작(각 1대)	해수 중에서의 장기사용으로 인한 노후화로 설비 신뢰성 및 성능 저하되어 교체	210	‘05.08	‘05.03	“
#1 Sea Water Booster PP 제작(1대)	해수 중에서의 장기사용으로 인한 노후화로 설비 신뢰성 및 성능 저하되어 교체	120	‘05.08	‘05.03	“
#1 CWP Disch. & Tie VV 제작(3EA)	해수 중에서의 장기사용으로 인한 노후화로 설비 신뢰성 및 성능 저하되어 교체	150	‘05.08	‘05.03	“
#1,2 수전전력 역율 개선 시스템 제작구매 (설치조건부)	역율개선용 Condenser,Reactor & 조작반 1식	620	‘05.08	‘05.03	“
#1,2 IDF 전동기 제작 구매	6.9㎸ 3780/2220㎾ 1대	650	‘05.08	‘05.03	“
#1,2 480V Com 저압차단기반 제작구매	- Load Center 2 Set - MCC 3 Set	500	‘05.08	‘05.03	“
#1,2 6.9㎸ 고압차단기 구매	7.2㎸ 1200A 500MVA VCB 10대	281	‘05.08	‘05.04	“

구매 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

건 명	개 요	예산액	납품기한	발주 예정월	발주 사업소
#1,2 TBN Spill Strip 제작	장기 사용으로 마모 손상된 Spill Strip 교체 o LP-A(12,13,14,16단) o LP-B(13,14,15,16단)	150	‘05.08	‘05.05	삼천포화력
미분기 출구 곡관 배관 제작	미분기 출구 곡관배관 장기사용에 따른 제작교체	150	‘05.08	‘05.05	“
Grinding Roll 제작	장기사용에 따른 제작교체	100	‘05.08	‘05.05	“
공기구 계측기 구매 (HGI Tester 1set 외 9개 품목)	신규구입 및 장기사용 에따른 노후화로 교체	144	‘05.06	‘05.05	“
3호기, Common UPS 제작구매	3상 100kVA 2대	200	‘05.11	‘05.07	“
1～6호기 상,하역 컨베이어 계통 벨트 구매	장기 사용한 벨트 교체	150	‘05.11	‘05.09	“
탈황폐수처리설비 화공약품 구매 연간 단가계약	-용도 : 탈황폐수 처리설비 화공약품 -약품 메탄올 37,116kg 탄산소다 126,936kg 인산 3,711kg 아황산수소나트륨 143,391kg Liquid Chelate 1,855kg	127	’05.12	‘05.12	“

공사 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

공 사 명	공사개요	예산액	공사기간	발주 예정월	발주 사업소
1호기 Fan 방음설비 설치공사(설치조건부)	1호기 통풍기 방음기 설치	300	제작: 5개월 설치 :2개월	‘05.03	삼천포화력

[여수화력발전처]

구매 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

건 명	개 요	예산액	납품기한	발주 예정월	발주 사업소
1호기 보일러 터빈 주제어설비	주제어설비 개선 공사	3,640	3개월	‘05.02	여수화력
1호기 고압차단기반 제작	고압차단기반 제작교체	300	2개월	‘05.02	“
1호기 보호계전기반 및 ECMS 제작	디지털 보호계전기반 및 ECMS 5면 제작	650	3개월	‘05.02	“
#1 BNR 설비개선 (설치조건부)	#1 BNR Side개선	300	4개월	‘05.02	“
#1 SB 구매 (설치조건부)	#1 SB 제작교체	125	4개월	‘05.02	“
#2 증기식 공기 예열기 교체	SAH 교체	220	2개월	‘05.02	“
탈황 Mill Rubber Liner 제작	Mill Rubber 제작교체	150	2개월	‘05.02	“
탈황 Mill Hydro Oil 유압 모터 및 Pump 구입	설비정수 예비품 구입	165	4개월	‘05.02	“
탈황 #1 GGH RH Bundle 구매	GGH RH Tube 1Bundle 구입	1,100	9개월	‘05.02	“
탈황 #1GGH CLR Bundle 구매	GGH CLR Tube 1Bundle 구입	900	10개월	‘05.02	“
#1 Damper 구매	#1 Damper 교체	150	3개월	‘05.03	“

구매 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

건 명	개 요	예산액	납품기한	발주 예정월	발주 사업소
1호기 터빈설비 전동화밸브 구매	Main Cond.r WTR Box Vent Valve등 20종	150	3개월	‘05.03	여수화력
1호기 BNR 개선공사	1호기 BNR 현 장판넬 제작 및 BNR 개조	120	2개월	‘05.03	“
탈황석고동 승강기 설치	탈황석고동 승강 기 및 승강로 설치	220	3개월	‘05.03	“
1호기 EP Control Panel 교체	Control Panel 4면 제작 교체	100	2개월	‘05.03	“
EP Ash Sys 보강 자재(설치조건부)	#1,2 회처리계통 분리	200	2개월	‘05.05	“
EP 정류형 변압기 구입	정류형 변압기 2대구입	100	2개월	‘05.09	“

공사 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

공 사 명	공사개요	예산액	공사기간	발주 예정월	발주 사업소
제1호기 보일러 ACR 세정공사	제1호기 보일러 세정	241	1개월	‘05.02	여수화력
화학,환경설비 원격통합 감시 시스템 구축공사	PLC 모듈증설과 전송망을 구축하여 폐수처리설비, 물처리설비, 분석실 데이터를 통합 감시하는 시스템 구축	176	6개월	‘05.02	“
1호기 고압차단기반 및 노후케이블 교체공사	고압차단기 및 케이블교체	300	2개월	‘05.04	“
1호기 BNR 개선공사	BMS 개조 및 Local Panel 설치	130	2개월	‘05.04	“
1호기 전기설비 자동화 공사	노후전기설비 전동화 공사	100	2개월	‘05.04	“
#1 Gas Leak,처 정비공사	보일러 Gas Leak처 정비	300	1.5개월	‘05.04	“
합숙소 리모델링공사	합숙소내부개선	288	2개월	‘05.04	“
제어실 환경개선공사	제어실마감재교체	176	2개월	‘05.04	“
사택 리모델링공사	사택내부개선	698	7개월	‘05.05	“
중유 해상관로설치 공사	4.5Km 관로 설치	4,000	5개월	‘05.06	“
사옥내부환경개선 공사	사옥환경개선	200	50일	‘05.08	“
power block 미관 개선 공사	연돌,발전본관등 도장보수	250	2개월	‘05.08	“

용역 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

용 역 명	용역개요	예산액	용역기간	발주 예정월	발주 사업소
중유 해상공급 관로용역	설계용역	207	5개월	‘05.01	여수화력
2호기 Initial overhaul 제작사 기술지원	328.6MW	200	2개월	‘05.02	“
중유회 위탁처리	예상발생량 1300톤	171	12개월	‘05.02	“
1호기 정밀진단 및 수명 평가 용역	200MW	200	3개월	‘05.04	“

[영동화력발전처]

구매 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

건 명	개 요	예산액	납품기한	발주 예정월	발주 사업소
직류접지 검출장치 설치	비상전원설비 고장진단 설치 설치	100	1개월	‘05.04	영동화력
1호기 FW.CV 교체	노후설비 교체	250	6개월	‘05.03	“
1~5 HP 고압급수가열기 교체	노후설비 교체	450	6개월	‘05.02	“
1호기 Mill 정비자재 구입	1호기 Mill Girth Gear & Pinion Gear 제작구입	270	4개월	‘05.02	“
1호기 석타하역기 보강	견인용 삽날설치	220	3개월	‘05.06	“
발전기 및 고압전동기 On-Line 절연진단장치 설치	고압회전기기 사전예측진단설비 설치	560	3개월	‘05.07	“
변압기 On-Line 유중가스 분석기 설치	변압기 고장진단설비 설치	110	2개월	‘05.09	“
전기판넬 음성경보설비 설치	예방안전인프라구축을 위한 사전경보 및 차단설비 설치	168	2개월	‘05.09	“
1호기 MOV 교체	노후설비 교체	100	1개월	‘05.10	“

공사 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

공 사 명	공사개요	예산액	공사기간	발주 예정월	발주 사업소
소방설비 교체	노후 옥외소방 설비 교체	250	5개월	’05.02	영동화력
1호기 기기냉각수 배관교체	노후배관 교체	130	2개월	‘05.06	“
폐수처리설비보강	노후설비 보강	150	3개월	‘05.06	“
스위치야드 유효부지내 소공원설치	조경공사	110	2개월	‘05.04	“
소내 다목적 인조잔디구장 조성공사	잔디구장 설치	150	2개월	‘05.06	“
발전부 목욕탕 보수공사	노후설비 보수	103	2개월	‘05.03	“
본관 도장공사	도장공사	420	3개월	‘05.08	“
발전본관 외벽 사이딩 보수공사	노후설비 보수	110	3개월	‘05.04	“
발전본관 및 사무동 옥상 방수공사	방수공사	170	3개월	‘05.05	“

[무주양수발전처]

구매 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

건 명	개 요	예산액	납품기한	발주 예정월	발주 사업소
P/H & C/H 축전지 구매	노후축전지 교체	100	30일	‘05.03	무주양수
발전전동기 회전자 코일 제작구매	설비보강	100	90일	‘05.03	“
주변압기 상시감시 설비 구매	변압기 내부 고장 감시	120	60일	‘05.05	“

공사 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

공 사 명	공사개요	예산액	공사기간	발주 예정월	발주 사업소
천정크레인 정비공사	주제어 PLC 교체	200	2개월	’05.06	무주양수

[분당복합화력발전처]

구매 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

건 명	개 요	예산액	납품기한	발주 예정월	발주 사업소
연소실 Support Cylinder 구매	장기사용으로 균열 및 열화 손상되어 구매	150	'05.03	’05.02	분당복합
GT Rotor Coupling Bolt 구매	노후화로인한 교체	200	'05.06~07	'05.06	“
Finned Segment 구매	신형으로 교체	300	'05.07~09	'05.08	“
보호계전기 교체	노후 보호계전기 교체	1,250	05.05	05.02	“
전력선통신을 이용한 에너지 절약 시스템	전력선 통신을 이용한 에너지 절약 시스템시범 구축사업	350	05.03	05.01	“

공사 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

공 사 명	공사개요	예산액	공사기간	발주 예정월	발주 사업소
#1 Block HRSG 폐열회수설비공사	폐열회수 설비설치	3,000	9개월	’05.04	분당복합
GT 공기여과기 개선	Air Intake Housing 개선	350	4개월	’05.08	“
경비용 CCTV 교체 공사	경비용 CCTV주장치, 카메라,모니터,기타 부속설비 교체공사	132	2개월	’05.05	“

[영흥화력본부]

구매 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

건 명	개 요	예산액	납품기한	발주 예정월	발주 사업소
무재해 전광판	무재해 정보 및 홍보용 전광판	150	‘05.08	‘05.02	영흥화력
3,4호기 주설비 조명 일반등기구	3,4호기 주설비 등기구 설치 자재	150	‘08.12	‘05.03	“
화공약품(PAC외8종) 연간단가계약	순수제조 및 폐수처리약품 등	297	‘06.06	‘05.05	“
소포제 연간단가계약	냉각수 배수구 거품제거용	500	"	‘05.05	“
1,2호기 BFPT 정비용 Crane(10ton)제작설치	정비용 Crane 설치	180	‘05.06	‘05.02	“
탈황제어설비 MMI 추가 설치	탈황운전용	120	‘05.06	‘05.03	“
Coal Measurement System 설치	Coal Flow를 측정	450	‘05.06	‘05.03	“

공사 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

공 사 명	공사개요	예산액	공사기간	발주 예정월	발주 사업소
해수온도측정기 설치	표층수온센서, 등부표 각 3개소 설치	204	‘05.05~06	‘05.05	영흥화력
#1,2 보일러 진공청소 설비 설치공사	#1,2 보일러 진공청소 배관설치	200	‘05.05~07	‘05.05	“
보조보일러 하우스 설치 공사	보조보일러 옥내화 공사	100	‘05.02~06	‘05.02	“
CSU-01A/B Gantry Conveyor 하부 Drag Chain Scraper 설치	Scraper설치로 낙탄 및 분탄을 방지	200	‘05.03~07	‘05.03	“

[에천양수건설처]

용역 발주예정 내역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(단위 : 백만원, VAT 제외)

용 역 명	용역개요	예산액	용역기간	발주 예정월	발주 사업소
문화재 발굴조사 용역	50,987㎡	980	12개월	‘05.03	예천양수