3/4분기 감리용역 발주계획

※ 용역비, 일정등은 추정자료 이므로 추후 변경될수 있음.

▣ 시행규모

ㅇ 아 파 트 : 아파트 20지구 28공구 16,301호

ㅇ 토목공사 : 대지조성공사 3, 하수종말처리장 1, 도로 2지구

▣ 6월 발주계획 : 아파트 8지구 3,654호, 대지1․하수처리장1지구

지구명	구분	세대수	착공예정월	추정금액 (부가세제외)	공고예정일	비 고
원주개운+ 횡성읍하	국민임대	232 361	7 10	2,168백만원	6월 5일	책임감리
충주연수	국민임대	498	7	1,637백만원
논산대교+ 청양읍내	국민임대	548 305	7 10	2,798백만원
오산세교	국민임대	736	7	1,996백만원
창원도계	국민임대	504	7	1,652백만원
거제일운	국민임대	470	7	1,458백만원
대전서남부	대지조성	2,276천㎡	7	-	6월 12일	시공감리
군포부곡	하수종말처리장	4,500㎥/일	6	-		책임감리

▣ 7월 발주계획 : 아파트 4지구 5,013호, 도로1지구

지구명	구분	세대수	착공예정월	공고예정일	비 고
오산누읍	국민임대	1,179	8	6월 26일	책임감리
광명신촌 광명소하	국민임대 공공분양	776 701	8 9
오산청호	국민임대	1,275	8
대구율하1+ 대구율하2+ 대구율하2	국민임대 국민임대 공공분양	457 976 350	8 9 11		시공감리
대구금호	도로(교량)	0.41㎞	8		시공감리

▣ 8월 발주계획 : 아파트 7지구 7,634호, 대지2, 도로1지구

지구명	구분	세대수	착공예정월	공고예정일	비 고
양주고읍4,5,6BL	국민임대	1,422	9	7월 24일	책임감리
화성향남5,6BL	국민임대	2,480	9
고창읍내	국민임대	586	9
김천대신 구미구평 구미옥계 구미옥계	국민임대 국민임대 국민임대 공공분양	422 377 998 648	9 9 9 10		시공감리
여수죽림	대지조성	674천㎡	9		시공감리
의왕포일2	대지조성	532천㎡	9
오산세교	서부우회도로	5㎞	9

감리용역 발주검토

▣ 감리비 검토

지구명	세대수	책임감리비용(백만원)			시공감리비용(백만원)			차이
		용역비	지원업무비	계	용역비	감독비	계
대구율하1 대구율하2 대구율하2	457 976 350	3,145	-	3,145	2,450	170	2,620	-525
	1,783
김천대신 구미구평 구미옥계 구미옥계	422 377 998 648	4,215	510	4,725	3,257	1,144	4,401	-324
	2,445

감리용역 발주

▣ 감리선정기준 : 공분․공임 400호, 국민 500호 이상을 선정하되,

현장별 여건 및 지역본부 의견을 감안해 선정

▣ 3/4분기 시행규모

ㅇ 건설규모 : 아파트 33지구 42공구 24,108호

ㅇ 아 파 트 : 아파트 20지구 28공구 16,301호

ㅇ 토목공사 : 대지조성공사 3, 하수종말처리장 1, 도로 2지구

▣ 4/4분기 시행계획

ㅇ 건설규모 : 아파트 49지구 96공구 67,392호

ㅇ 아 파 트 : 아파트 36지구 74공구 57,618호

ㅇ 토목공사 : 대지조성공사 2지구, 도로 4지구