2007 공사 발주계획

(단위:백만원)

담 당 부 서	사 업 명	사 업 비	발 주 시 기	추 진 계 획
급수팀	강변여과수개발사업(2단계)	9,200	6월	-공사설계 : 5월
	기간경과 및 고장계량기 교체(￠13 ~ 25m/m)	140	년중	-년중 상시 교체
	기간경과 및 고장계량기 교체공사(￠40m/m이상)	154	년중	-년중 상시 교체
	시가지 및 읍면 관망 정비공사	540	3월~11월	-3월 설계완료 -4월 공사발주 -10월 공사완료
	팔용동 일원 노후관교체공사	437	4월	-3월 설계완료 -4월 공사발주 -7월 공사완료
	대산면 죽동리(죽동~대방)노후관 교체공사	280	4월	-3월 설계완료 -4월 공사발주 -7월 공사완료
	변류 개.보수공사	150	년중	-3월 설계완료 -4월 공사발주 -10월 공사완료
	배.급수관 누수 수선공사	400	년중	-년중 상시 교체
	배수지,가압장 노후 제수밸브 교체공사	100	8월	-8월 공사발주
	시가지내 지관매설공사	162	3월	-3월 공사발주
	읍면지역 배급수관 매설공사	840	3월	-3월 공사발주
	송배수관 매설공사(시가지 일원)	300	4월	-3월 실시설계 -4월 공사발주
	시가지,읍면지역 급수공사	1,320	년중	-가정급수공사 신청 에 의함
	북면배수지 설치공사	2,389	계속	-05년 계속사업 토공사, 배수지 설치

2007 공사 발주계획

(단위:백만원)

담 당 부 서	사 업 명	사 업 비	발 주 시 기	추 진 계 획
정수팀	대산취수정 감시시설 설치공사	140	6월 초	-1.31 설계용역 발주 -3.08 설계완료 -6월 초 공사발주
	대산정수장 낙뢰 및 접지시설 설치공사	300	2. 07	-2.07 발주
	강변여과수 취수에 따른 환경영향 평가용역	70	4월 말	-4월 초 설계용역 -4월 말 용역발주
	수질검사 장비 구입	46	6월 중순	-필요장비가 외국산 으로 신중히 비교검토 후 6월 중 구입발주
하수팀	북면하수처리장 설치공사 (Q=12,000㎥/일)	21,012	‘07. 03	-착 공 : ‘07. 03 -준 공 : ‘08. 03
	대산․동읍차집지관 설치공사(L=10.0km)	5,910	‘07. 03	-착 공 : ‘07. 03 -준 공 : ‘08. 03
	북면하수관거 정비공사 (L=15km)	5,731	‘07. 03	-도로굴착 : ‘07. 03 -관로매설 : ‘07. 05 -도로포장 : ‘07. 11 -준 공 : ‘07. 12
	시가지우수관 개량 정비공사(L=4.0km)	500	‘07. 03	-착 공 : ‘07. 03 -준 공 : ’07. 12
	배후도시지하수오염 실태조사 용역	220	‘07. 03	-용역완료 : ‘07. 12
	창원시하수관거정비공사	2,199	‘07. 03	-도로굴착 : ‘07. 03 -관로매설 : ‘07. 05 -도로포장 : ‘07. 11 -준 공 : ‘07. 12
	의창1외8개블럭 하수관거정비공사	6,086	‘07. 03	-도로굴착 : ‘07. 03 -관로매설 : ‘07. 05 -도로포장 : ‘07. 11 -준 공 : ‘07. 12
	관거내부조사 및 가정배수설비 오접정비	320	‘07. 03	-실시설계 : ‘07. 03 -오접정비 : ‘07. 05 -공사준공 : ‘07. 11
	민원해소 시가지내 하수도 보수공사	3,007	'07. 03	-실시설계 : ‘07. 01 -착 공 : ‘07. 03 -준 공 : ‘07. 12
	하수도준설공사	650	'07. 03	-실시설계 : ‘07. 01 -착 공 : ‘07. 03 -준 공 : ‘07. 12