일괄입찰․대안입찰공사 계약특수조건 개정(안) 신․구 대비표

현 행(조달청 시설총괄팀-2350, ‘07. 7.10)	개 정(안)	개정사유
제1조 ~ 제21조 (생략)	제1조 ~ 제21조 (현행과 같음)
제22조(설계변경 등) ①설계변경을 하는 경우에도 일반조건 제21조제3항에 규정된 사유로 인한 경우와 다음 각호의 1의 사유로 인한 경우를 제외하고는 계약금액을 증액할 수 없다. 1. ~ 2 (생략) ②일반조건 제21조제3항 각호는 다음과 같이 적용한다. 1. ~ 2 (생략)	제22조(설계변경 등) ①------------------ ----- 제21조제4항에 ------------------ ------------------------------------ ----------. 1. ~ 2 (현행과 같음) ②------ 제21조제4항 ----------------. 1. ~ 2 (현행과 같음)	회계예규(공사계약일반조건) 개정에 따른 조문정리 *일괄입찰에서 기본설계와 달리 실시설계가 이루어지는 경우의 입찰금액 조정기준 마련 (공사계약일반조건 제21조 제2항 신설)
제23조 ~ 제24조 (생략)	제23조 ~ 제24조 (현행과 같음)
제25조(발주기관의 필요에 의한 설계변경)계약담당공무원이 일반조건 제21조제3항제1호 또는 일반조건 제19조의5의 규정에 의거 설계변경을 요구한 경우에는 계약상대자는 14일 이내에 설계변경의 이행가능 여부를 공사감독관과 계약담당공무원에게 동시에 통지하여야 한다. 이 경우 계약담당공무원은 계약상대자가 준비서류 작성 등을 위하여 기간 연장을 요청하는 때에는 이를 승인할 수 있다.	제25조(발주기관의 필요에 의한 설계변경)------ ---- 제21조제4항제1호 ------------------ ------------------------------------ ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------.	회계예규(공사계약일반조건) 개정에 따른 조문정리

현 행(조달청 시설총괄팀-2350, ‘07. 7.10)	개 정(안)	개정사유
제26조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)설계변경으로 삭제 또는 변경되었던 공종 또는 품목 등을 다시 당초 설계대로 변경하는 경우에는 당초 감액조정한 단가를 적용한다. 다만, 추가되는 수량에 대하여는 일반조건 제21조제2항제2호를 적용한다.	제26조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 제21조제3항제2호-- -----------------------.	회계예규(공사계약일반조건) 개정에 따른 조문정리
제27조 ~ 제50조 (생략)	제27조 ~ 제50조 (현행과 같음)
제51조(적격심사 관련사항의 준수의무)①계약상대자는 발주기관의 적격심사기준에 따라 하도급관리계획서를 제출한 경우 적격심사 당시 제출한 내용대로 철저하게 이행하여야 한다. ②계약상대자가 공사를 수행함에 있어 불가피한 사유로 제1항의 하도급사항을 변경하고자 할 경우에는 당초의 하도급 조건 이상으로 하여 발주기관의 장의 사전 승인을 받아야 한다	제51조(적격심사 관련사항의 준수의무) <삭 제>	일괄.대안입찰이 적격심사에서 PQ심사로 전환
제52조 ~ 제53조 (생략)	제52조 ~ 제53조 (현행과 같음)
부 칙 이 특수조건은 2006년 7월 3일 입찰공고분부터 적용한다.	부 칙 이 특수조건은 2007년 11월 22일 입찰공고분부터 적용한다.