성남시 수도정비기본계획(변경) 용역

과 업 내 용 서

2010. 2

	성남시 맑은물관리사업소 (수도시설과)

목     차

Ⅰ. 총  칙	1

1.0 과 업 명	1

2.0 과업의 목적	1

3.0 과업의 범위	1

3.1 계획기간	1

3.2 계획구역	1

3.3 과업의 주요내용	1

4.0 과업의 기간	2

Ⅱ. 과업수행방법	3

1.0 과업수행 일반사항	3

1.1 적용기준	3

1.2 공정계획 및 보고	3

1.3 용역기술자	4

1.4 과업의 변경	4

1.5 보안대책	4

1.6 기    타	5

2.0 수도정비 기본계획 수립 과업 내용	6

2.1 계획의 범위	6

2.2 계획수립 기본방침	7

2.3 기초조사	8

2.4 기본사항의 결정	10

2.5 시설확충계획	11

2.6 시설개량계획	13

2.7 마을상수도 및 소규모급수시설	16

2.8 상수원 확보 및 대체수원 개발계획	17

2.9 상수도 수질 관리계획	17

2.10 상수도 수요관리 계획	17

2.11 운영관리 개선계획	18

2.12 기술진단 계획	18

2.13 재해대책	18

2.14 사업시행 및 재정계획	18

2.15 기타 과업내용	19

3.0 과업성과품 제출	19

4.0 과업수행 예정공정표	20

Ⅰ. 총    칙

1.0 과 업 명
성남시 수도정비 기본계획(변경) 용역

2.0 과업의 목적
본 과업은 수도법 제4조 및 동법 시행령 제6조의 규정에 의거하여 상수도시설을 적정하고 합리적으로 설치‧관리하기 위하여 수도정비에 관한 종합적계획인 성남시 수도정비 기본계획(변경)을 수립함으로써 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 공중위생 향상과 생활환경 개선을 도모하는데 그 목적이 있다.

3.0 과업의 범위

3.1 계획기간 :
수도정비기본계획 목표년도 : 20년후(5개년단위의 시행단계 구분)

3.2 계획구역 : 행정구역상 성남시 전역

3.3 과업의 주요내용

▣ 수도정비 기본계획('06. 5 환경부 수립지침 준용)
⑴ 총       설
⑵ 기 초 조 사
⑶ 기본사항의 결정
⑷ 시설확충계획
⑸ 시설개량계획
⑹ 마을상수도 및 소규모급수시설 정비계획
⑺ 대체수원 개발계획
⑻ 상수도 수질관리계획
⑼ 상수도 수요관리계획
⑽ 운영관리 개선계획
⑾ 기술진단계획
⑿ 재해대책
⒀ 사업시행 및 재정계획

4.0 과업의 기간
본 과업은 착수일부터 300일간(10개월)으로 한다.

Ⅱ. 과업수행방법

1.0 과업수행 일반사항

1.1 적용기준

가. 본 과업지시서는 성남시 수도정비 기본계획(변경) 수립 용역업무를 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 과업지시서에 의하여 수행하되 과업수행에 필요한 사항으로 본 과업지시서에 명시되지 않은 모든 사항은 발주처와 협의하여 결정한다.

나. 본 과업은 성남시 지방상수도 운영효율화사업 실시협약을 근거하여 모든 수행업무는 성남시와 협의하여야 하며 최종보고서에 대하여 성남시 관련 부서의 승인을 받아야 한다.

다. 통계자료는 정부기관 및 관련기관에서 발행하는 최근의 자료를 이용하여야 하며, 장래 계획에 관한 추정치는 도시기본계획, 장기전망지표 등에 의한다.

라. 도급자는 발주처의 요구에 따라 동 용역과 관련한 각종 협의에 필요한 자료를 작성 제출하여야 하며 관련법규정 및 입법예고 된 법률도 확인해야 한다.

마. 본 과업의 적용단가는 건설협회, 측량협회, 엔지니어링 진흥협회에서 발표한 노임단가에 준한다.

1.2 공정계획 및 보고

가. 계약자는 과업 착수 보고시 과업 항목별로 책임기술자, 분야별 참여기술자, 과업수행계획서등 과업수행에 필요한 사항을 계약체결 후 15일 이내에 제출하여 감독관의 확인을 받아야 한다.

나. 과업수행 기간 중 매월 말 공정보고를 익월 10일 이내에 제출하여야 하며 과업 수행 중 해결하여야 할 중요한 사항에 대하여는 그 내용을 즉시 보고하고 감독관과 협의하여 결정한다.

다. 과업수행방법 및 성과의 세부내용을 검토하기 위하여 감독관의 요구가 있을 때에는 필요한 자료를 제출하고, 담당 전문기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 감독관의 지시사항에 대하여는 성실히 수행하고 조치결과를 즉시 서면으로 보고한다.

1.3 용역기술자

가. 본 용역에 종사하는 전문기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 감독관이 과업의 적정한 수행을 위하여 부적격하다고 판단할 경우 그 교체를 요구할 수 있으며, 계약자는 이에 응하여야 한다.

1.4 과업의 변경

가. 본 과업지시서에 기술되어 있는 모든 사항은 상호 보완적이며 명기되어 있지 않는 사항이라도 일반적 관행에 따라 당연히 수행되어야 할 경미한 사항에 대하여는 계약자 부담으로 시행하여야 한다.

나. 중대한 상황의 발생이나 현지조사 결과에 따라 과업내용을 변경하여야 할 경우에는 감독관과 계약자가 상호 협의하여 과업의 범위, 비용 및 과업시행에 대하여 변경할 수 있다.

1.5 보안대책

가. 계약체결 후 15일 이내에 용역업체의 대표자 및 용역과업 종사자의 보안각서를 제출하여야 한다.

나. 용역과업자료의 분실, 도난, 누출을 방지하고 자료의 철저한 보안을 위하여 자료 보관함을 별도로 설치 운영하고 관리책임자를 지정하여 과업을 수행하여야 한다.

다. 보안사항은 감독관과 협의하여 보안상 결함이 없도록 하여야 하며 이의 불이행으로 인한 책임은 용역업자가 전적으로 책임져야 한다.

라. 본 과업수행 종사자의 변동이 있을 시에는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 방지하고 이의 불이행으로 인한 책임은 도급자가 져야 한다.

1.6 기    타

가. 본 과업수행에 있어 과업지시서 문맥 해석 등에 대하여 쌍방간의 의견이 상이할 시는 감독관의 지시에 따라야 한다.

나. 본 과업수행 중 계약자는 제반업무에 관한 사항을 감독관과 사전 협의하여 처리하여야 하며 감독관은 본 과업을 수행하는데 필요한 자료와 편의를 제공하는데 협조한다.

다. 본 과업을 충실히 수행하기 위하여 선진국 기술의 견학 및 자료수집이 필요한 경우 이를 시행, 자료를 분석하여 본 과업의 성과물에 반영, 수립한다.

라. 환경부 승인 등 관계기관 협의 시 심사 및 협의과정에서 보완이 필요한 사항에 대하여는 도급자 부담으로 즉시 보완하여야 한다.

마. 계약자는 수도법 제4조 및 동법 시행령 제6조에 따라 환경부장관의 승인을 득하고 보완 후 최종 납품하여 검수 받아야 한다.

바. 본 과업과 관련하여 국가 및 지자체에 협의 및 승인을 득 하여야하는 사항이 있는 경우는 완료 후 검수 받아야 한다.

2.0 수도정비 기본계획 수립 과업 내용

2.1 계획의 범위

가. 목표년도 : 2030년(5개년 단위의 시행단계로 구분)

나. 계획구역 :
성남시 전체 행정구역을 원칙으로 하여 기본계획을 수립하고 합리적이고 효율적인 급수계획이 될 수 있도록 지역적 범위를 설정한다.

다. 타 계획과의 관계

⑴ 상  위  계  획 : 전국수도종합계획, 수자원장기종합계획, 광역상수도계획, 성남시 도시기본계획 등

⑵ 하  위  계  획 : 각종 상수도 및 중수도시설계획

⑶ 기 타 관련계획 : 물수요관리종합계획 및 물수요관리시행계획, 산업단지개발계획, 택지개발계획, 하천정비계획등
관련 개발계획

라. 기본계획수립의 주요사항

⑴ 수도의 정비에 관한 기본방침

⑵ 수돗물의 중장기 수급에 관한 사항

⑶ 수도공급구역에 관한 사항

⑷ 상수원의 확보 및 상수원보호구역의 지정‧관리

⑸ 수도시설의 배치‧구조 및 공급능력

⑹ 수도사업의 재원조달 및 실시순위

⑺ 낡은 수도관 및 수도시설의 개량‧교체 등

⑻ 중수도의 개발‧보급

⑼ 광역상수도와 지방상수도를 연계하여 운영할 필요가 있는 지역의 통합급수구역에 관한 사항

2.2 계획수립 기본방침

가. 기본계획은 상수도에 관한 장기적이고 종합적인 계획이므로 전체의 구상이 포괄적이고 실현 가능하며 시행의 과정과 변화에 대한 탄력성이 확보될 수 있도록 수립한다.

나. 수도정비의 목표는 급수 보급률 증대를 통하여 맑고 깨끗한 물을 시민에게 항상 공급함으로써 공중위생의 향상과 생활환경을 개선하는데 있으므로 지표설정 및 세부계획의 수립에 있어서는 항상 이 목적을 달성하는데 방향을 맞추도록 한다.

다. 기본계획의 수립은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제10조의 규정에 의한 도시기본계획을 기본으로 하되 관련 상‧하위계획을 고려하여야 하며, 특히, 전국수도종합계획, 광역상수도계획, 수자원장기종합계획 등을 충분히 검토하고 물수요관리종합계획 및 시행계획의 내용을 반영하여야 한다.

라. 기본계획은 목표연도를 5년단위의 시행단계로 구분하고 있으므로 각종 지표설정 및 세부계획수립에 있어서도 단계별로 설정‧수립한다. 단계구분은 특별한 사유가 없는 한 기본계획 전체에 걸쳐 동일하게 적용한다.

마. 기본계획을 도면으로 나타내는 경우 각 시행단계를 색상으로 구분할 때는 다음과 같이 구분한다.

구 분	현 황	제1단계	제2단계	제3단계	제4단계
색	흑색	청색	적색	노랑	녹색

바. 기본계획 수립시 관계법령 및 문헌‧연구보고서 등 자료조사와 함께 특히 계획대상지역과 여건이 유사한 지역에서 기 수립된 기본계획을 참조하여 내용이 풍부하고 치밀한 계획이 되도록 한다.

사. 기본계획 수립을 위한 기초조사는 실측조사를 원칙으로 하고 실측 조사된 자료는 공인된 기관에서 발간된 최근 자료를 활용하여 비교‧검토하여야 한다.

아. 기본계획은 상수도에 관한 종합적이고 장기적인 계획이므로 하위 시설계획의 방향 및 지침을 제시하는 것으로 하고, 하위 시설계획에서 세부적으로 결정할 사항까지 수립하는 것은 지양한다.

자. 기본계획의 내용은 구체적인 목표를 제시하고 이를 달성하기 위한 합리적, 효율적인 수단을 개발함과 동시에 다른 분야의 계획과 상호 관련체계를 유지하도록 하고 산출근거와 자료출처를 명확히 한다.

차. 기본계획수립에 사용하는 용어는 수도법령 또는 상수도 시설기준 및 상수시설기준(유지관리편)에 정의된 용어를 사용한다.

카. 기본계획은 상수도시설의 신설계획 뿐만 아니라 기존시설의 개량계획이 포함되므로 가능한 한 기존시설의 활용도를 극대화하고 유지관리상 문제점을 분석하여 대책을 제시하고 개량계획을 수립한다.

타. 상기와 같이 제시된「수도정비 기본계획의 작성기준은 기본계획수립에 있어서 일반적이고 최소한의 기준이므로 계획대상지역이 여건 등에 비추어 불합리할 때에는 감독관과 협의하여 추가 변경하거나 기준의 내용을 수정하여 적용할 수 있다.

2.3 기초조사

가. 자연적 조건에 관한 조사
⑴ 지역의 역사, 행정, 발전과정 등 연혁
⑵ 지역의 위치, 면적, 지세, 지형 및 지질 등의 개황
⑶ 하천 및 호소 등의 수계현황
⑷ 강설, 강우, 침수의 기록 및 침수피해상황, 풍향 등의 기상개황

나. 사회적 특성에 관한 조사
⑴ 행정구역 및 인구현황
⑵ 지역경제
⑶ 산업현황
⑷ 토지이용현황

다. 관련계획에 대한 조사
⑴ 장기 및 상위계획

◦ 국토건설종합계획, 도 건설종합계획(상수도와 관련된 계획을 비교 요약)

◦ 전국수도종합계획, 수자원장기종합계획, 국토종합계획

◦ 인구, 산업배치 등 계획지역에 관련된 각종 장기계획

◦ 도시기본계획

⑵ 토지이용계획

◦ 도시계획상의 도시계획구역

◦ 국토이용계획상의 국토이용계획

⑶ 기타 계획

◦ 인접지역의 수도정비기본계획

◦ 토지개량사업계획

◦ 휴양시설현황 및 개발계획

◦ 지하수관리기본계획, 하수도 정비 기본계획

라. 급수량 산정을 위한 기초조사
◦ 과거 용도별 사용실적 등 급수량 실적 조사
◦ 공급계통별 공급량의 변화 조사
◦ 용도별 사용수량의 변동요인 분석 및 관련자료 조사
◦ 지하수 등 자가용수 이용 실태조사

마. 상수도 현황
◦ 수도의 급수현황 및 관리실적, 개발현황 등에 관한 조사
◦ 수원의 수량, 수질현황 및 변화 조사
◦ 취⋅정수시설 현황조사
◦ 송⋅배수시설 현황조사

바. GIS 구축에 관한 조사
◦ GIS 구축현황 및 계획, 상수도시설 관리계획
◦ GIS 구축에 관한 사전연구 및 기본계획, 연도별 사업추진계획
◦ 국가지리정보체계(NGIS) 수치지도 제작, 수치지도활용 관련부서 및 활용업무
◦ 시스템 개발 및 활용효과에 관한 조사

사. 기 타
◦ 빗물이용시설의 설치현황 및 계획

2.4 기본사항의 결정

공급계통별, 급수구역별로 지역여건 및 특성을 반영하여 기본사항을 결정한다.

가. 계획목표연도

◦ 기본계획 수립 예정년도를 기준으로 20년 후를 원칙으로 한다.

◦ 목표연도는 5년단위로 4단계의 시행단계로 구분함을 원칙으로 하되, 관련 계획과의 연계상 부득이한 경우에는 기준과 다르게 정할 수 있으며 타당성 있는 근거를 제시한다.

나. 계획급수구역

◦ 계획급수구역은 계획 기간내에 배수관을 부설하여 급수가 가능한 지역으로 기존 시가지 및 장래 개발될 곳을 중심으로 결정한다.

◦ 수도이용의 확대와 지역주민의 복지를 고려하여, 마을상수도 급수 지역과 인구밀도가 낮거나 장래 도시발전 전망이 적은 곳도 기술적, 경제적 측면을 검토하여 급수구역 포함여부를 결정한다.

◦ 수자원의 효율적 이용 및 지역간 용수수급의 불균형 해소를  위해 광역상수도와 지방상수도를 연계하여 운영할 필요가 있는 지역은 통합급수계획을 단계별로 설정한다.

다. 계획급수인구 및 관련변화의 분석

◦ 계획급수인구는 계획기간내 추정된 인구에 계획급수보급율을 곱하여 결정하고 급수구역 및 분구별로 구분하여 제시한다.

◦ 계획인구는 도시계획 등 상위계획과 과거 인구증감 및 사회적 조건에 따른 인구증감을 고려하여 합리적으로 결정한다.

◦ 인구에 대한 변화경향을 파악하기 위하여 인구 및 세대수, 인구의 전출입, 주택수의 변화를 기초로 인구 및 세대수 증가율, 세대당 인구수, 인구의 순이동 항목으로 분석 제시한다.

라. 계획급수량 원단위

◦ 공급계통별로 과거 통계 및 실측자료를 기초로 계획기간중 평균급수량을 추계‧분석하여 제시한다.

◦ 「2.3 라. 급수량 산정을 위한 기초조사」에서 분석된 변동부하율의 범위를 검토하여 결정하고, 상수도시설기준상의 부하율과 비교 제시한다.

◦ 조사‧분석자료의 신뢰도가 미흡한 경우 유사도시의 변동부하율과 국내‧외의 관련 문헌자료 등을 참고하여 결정한다.
(유수율 향상계획 및 누수율 저감계획을 반영한 결과 제시)

마. 계획급수량

◦ 계획 1일 평균급수량은 계획 1인1일 평균급수량에 계획급수인구를 곱하여 결정하고 유지관리비와 상수도요금의 산정 등에 활용한다.

◦ 계획 1일 최대급수량은 계획 1인1일 최대급수량에 계획급수인구를 곱하여 결정하고 상수도시설 규모결정의 기초가 되는 수량으로 사용한다.

◦ 급수수요량은 생활용수와 전용공업용수로 구분하고 관광용수 등 별도의 수요가 있을 시는 이를 구분하여 산정한다.

2.5 시설확충계획

국가 물수요관리정책 강화에 맞추어 전국수도종합계획과 물수요관리종합계획 및 시행계획을 반영하여 적정한 시설확충이 되도록 계획을 수립한다.

기 검토,계획된 성남시 상수도 관련자료를 활용하여 계획에 반영한다.

- 고도정수처리시설 도입 타당성조사 및 기본계획수립(2009.12)

- 수정⋅중원구 송⋅배수관로 정비 실시설계(2010.2)

- 분당구 상수도 관망 블록구축공사 (2007.12) 등

가. 확장용량계획

◦ 시설용량을 확장하는 계획은 신규시설을 계획하는 것과는 다르므로 기존시설의 운영현황을 분석하여 반영한다.

◦ 생활용수와 공업용수의 연도별 수요량계획에 따라 확장계획을 수립한다.

◦ 공단개발에 따라 공업용수수요가 예상되는 지역에서는 공단의 지리적 입지여건 및 시설설치의 경제성 등을 고려하여 별도의 전용공업용수공급계획의 수립을 검토한다.

나. 수원 및 취수시설

◦ 수자원의 효율적 이용을 도모하기 위하여 광역상수도 수수계획, 식수전용저수지 개발계획, 강변여과수 개발계획, 지하수 및 암반과정 개발계획 등을 검토하고, 광역상수도에서 수수하고자 하는 경우에는 미리 관계기관의 의견을 수렴하여 반영한다.

다. 정수시설

◦ 정수시설을 확충할 필요가 있을 경우에는 취수장 및 정수시설과의 지리적 위치, 동수구배도, 정수장 예정부지의 토질조건, 부지매입의 용이성, 시공 및 유지관리의 용이성, 장래 확장계획 등을 고려하여 몇 개의 후보지를 비교‧검토후 결정한다.

◦ 원수의 수질, 정수량, 용지취득의 용이, 건설비, 유지관리의 난이도, 관리수준 등을 고려하여 적절한 정수방법을 결정한다.

◦ 원수수질을 고려하여 고도정수처리시설 도입의 필요성을 검토한다.

라. 송․배수시설

⑴ 급수구역의 분할

◦ 행정구역, 지반고, 하천, 철도 등 지형여건을 기본으로 하되, 가능하면 행정구역 경계로 분할한다.

◦ 분할된 급수구역을 단일 배수지의 배수가능범위로 분할(급수구역의 분할)하되 배수지의 위치조건 및 기존 배수관망 등을 고려하여 결정한다.

◦ 가능한 급수구역 상호간의 비상급수가 가능하도록 계획한다.

⑵ 송․배수계획

◦ 기존 급수구역의 특성, 급수량, 유지관리 및 기존 시설과의 연계성 등을 종합적으로 검토하여 배수방식을 결정한다.

◦ 지역적 특성에 따라 저‧중‧고지대로 구분하여 송․배수계획을 수립하는 것이 바람직하며, 배수지의 위치는 경제적인 높이가 될 수 있도록 계획한다.

◦ 급수취약지역 및 수압이 높은 지역에 대한 대책을 수립한다.

⑶ 계획 배수관망도의 작성

◦ 급수구역별로 계획관로에 대하여 계획배수관망도를 작성(1/2천5백~1/5천 수치지형도 이용)하되 지형정보시스템과 연계하여 사용될 수 있도록 계획한다.

⑷ 가압장 계획

◦ 배수지계획과 기존 가압장을 연계하여 가압장 정비계획을 수립한다.

2.6 시설개량계획

기존 시설에 대한 현황 및 문제점을 분석하고 평가결과를 기초로 계획 기간 중 연차별 시설개량계획을 수립한다.

가. 자료수집 및 평가

⑴ 수질자료수집 및 평가

◦ 최근 수년간의 원수 및 정수수질, 응집제주입률, 염소주입률(염소주입위치별)  관한 자료를 분석‧평가한다.

◦ 원수수질에 따른 응집제주입률의 수질인자별 상관관계를 분석‧평가한다.

◦ 소독능(CT값) 및 불활성화비에 대한 자료를 분석‧평가한다.

⑵ 시설자료수집 및 평가

◦ 기존 주요기계장비 목록을 작성하고 설치이후의 상태를 평가한다.

◦ 주요 단위공정별로 시설물 치수의 측정, 주요 지점별 수위측정 및 수리계통도와 비교‧평가한다.

⑶ 운영시스템 자료수집 및 평가

◦ 시설운영자의 운전경험, 운영상의 제반 문제점 및 조치결과, 참고 사항을 정리하고 평가한다.

◦ 전기‧계장 및 관리시스템 구성도 등 목록을 작성하고 상태를 평가한다.

나. 취수시설

⑴ 기본사항

◦ 취수시설 개량계획은 기 수행된“성남시 수도시설 기술진단(2010.2)”자료를 활용하는 것으로 한다.

⑵ 단위시설별 개량계획

◦ 하천에서는 하천표류수, 복류수 등 취수방법이 다르므로 취수지점의 안전성 및 취수량의 적정성을 평가하여 개선방안을 제시한다.

⑶ 취수펌프장 및 도수관로

◦ 취수펌프장의 흡수정내 유속분포의 개선에 의한 펌프운영의 효율제고 방안을 제시한다.

◦ 도수관로에 설치되어 있는 밸브류, 수격방지시설(펌프장 포함)의 운영현황을 분석‧평가하여 개선 방안을 제시한다.

◦ 취수펌프장 유출부 및 착수정 유입부의 유량을 비교‧검토하고, 도수관로의 문제점(관내부 스케일에 의한 단면부족, 손실수두의 증가, 누수 등)을 평가하여 개선방안을 제시한다.

다. 정수시설

⑴ 기본사항

◦ 정수시설 개량계획은 별도의 기술진단 시행없이 기 수행된 “성남시 수도시설 기술진단(2010.2)”자료와 “고도정수처리시설 도입 타당성조사 및 기본계획수립(2009.12)” 자료를 활용한다.

⑵ 단위시설별 개량계획

◦ 단위시설들이 설치목적을 달성하고 양질의 수돗물을 생산할 수 있도록 최근 수년동안의 일생산량 추이를 기초로 분석항목에 따라 시설물을 분석하고 문제점을 도출하여 평가후 개량방안을 제시한다.
- 착수정
- 혼화지
- 응집지
- 침전지
- 여과지
- 소독설비
- 정수지(배수지)

라. 배출수 처리시설

◦ 배출수처리시설 개량계획은  별도의 기술진단 시행없이 기 수행된 “성남시 수도시설 기술진단(2010.2)”자료를 활용한다.

마. 송‧배수시설

◦ 송‧배수시설 개량계획 중 배수지시설 및 가압장시설은 별도의 기술진단 시행없이 기 수행된 “성남시 수도시설 기술진단(2010.2)”자료를 활용한다.

◦ 수정구, 중원구 송‧배수 관망에 대한 개량 계획은 기 수행된 “ 수정⋅중원구 송⋅배수관로 정비 실시설계(2010.2)”용역의 결과를 활용한다.

◦ 분당구 송‧배수 관망에 대한 개량 계획 수립 시 기 수행된 “ 분당구 상수도 관망 블록구축공사 (2007.12)”의 결과를 고려하여 수립한다.

◦ 최근 수년동안의 공급계통 및 정수장별, 급수구역별로 수도관말의 잔류염소에 대한 자료를 수집하여 월별, 계절별로 분석하고 개선방안을 제시한다.

◦ 시설확장계획을 고려하여 공급계통 및 정수장별, 급수구역별로 송‧배수관로, 배수지, 가압장에 대한 년차별 교체 및 개량 등의 정비계획을 수립한다.

◦ 배수계통의 적정화를 기하고, 유량계, 수압계, 수질계기 등의 설치는 시설현대화계획과 연계하여 계획한다.

◦ 송‧배수시설의 효율적 운영‧관리체계를 구축하여 유수율을 제고하고 수도사업의 경영합리화를 촉진하기 위하여 단계별, 급수구역 및 분구, 블록단위별로 유량계, 수압계의 설치계획을 수립한다.

◦ 배수지의 효율적인 유지관리와 배수계통의 관로 사고시에 대비한 비상급수체계를 검토하고 계획을 수립한다.

바. 유량계 등 설비 및 시스템 개량계획

◦ 수정구, 중원구 송‧배수 관망에 대한 개량 계획은 기 수행된 “ 수정⋅중원구 송⋅배수관로 정비 실시설계(2010.2)”용역의 결과를 활용한다.

◦ 분당구 송‧배수 관망에 대한 개량 계획 수립 시 기 수행된 “ 분당구 상수도 관망 블록구축공사 (2007.12)”의 결과를 고려하여 수립한다.

◦ '수도법 시행규칙 제9조 일반수도사업자의 수량분석' 및 '수도법 시행규칙 별표3'에 따른 관리현황 조사 분석

◦ 블록내의 유수율 및 누수율 분석, 누수지점을 효과적으로 예측하고 송․배수시설의 효율적 운영․관리를 위해 유량계 및 수압계 등의 설치계획 수립

사. 시설의 폐지 또는 휴지

◦ 기존시설의 조사 및 검토결과 수도시설의 기능상실(광역상수원 공급 등), 수질오염, 기타 여건 변화에 따라 부득이 기존시설을 폐지 또는 휴지 하여야 할 경우 이에 대한 대책을 수립한다.

◦ 자체정수장의 폐쇄계획의 타당성과 이에 수반되는 수자원에 대한 소유권 문제 및 제반시설(취수시설, 가압장, 정수시설 등)에 대한  활용방안 수립 등을 검토한다.

2.7 마을상수도 및 소규모급수시설

◦ 운영 중인 마을상수도가 없으므로 제외한다.

2.8 상수원 확보 및 대체수원 개발계획

◦ 광역상수도 수수계획, 상수원 이전 및 개발계획, 식수전용저수지 개발계획, 강변여과수 개발계획, 지하수 및 암반관정 개발계획 등과 연관하여 검토한다.

◦ 자체 및 광역상수도공급에서 제외된 지역, 상시 가뭄 또는 상수원 오염으로 식수난을 겪고 있는 지역을 대상으로 양질의 식수를 공급하기 위한 상수원확보방안을 검토한다.

◦ 현재 상수원이 오염되었거나 장래 상수원의 기능을 상실할 우려가 있을 경우에는 대체수원의 개발계획을 수립한다.

2.9 상수도 수질 관리계획

◦ 취수, 정수, 송․배수, 급수과정에서 수돗물 수질저하의 원인을 분석하고 수질저하 방지대책을 수립한다.

◦ 상수원 수질관리를 위하여 상수원 보호구역 지정 및 수질관리계획을 수립한다.

◦ 정수수질관리를 위하여 정수처리공정상의 문제점을 분석하고 수질개선계획을 수립한다.

◦ 수원의 수량, 수질현황 및 변화를 분석‧평가한 결과와 수질검사 결과를 토대로 고도정수처리시설 도입시기 등을 목표년도별로 예측하여 제시하고 정수처리방식 등 개선방안을 제시한다.

◦ 노후 수도관 개량, 수도관 재질개선, 급배수관로의 위생관리 등에 관한 연차별 개선계획을 공급계통별, 급수구역별로 수립한다.

◦ 급수구역내 저수조에 대한 수질검사 결과를 분석‧제시하고 저수조 관리계획 수립에 반영한다.

2.10 상수도 수요관리 계획

◦ 물수요관리종합계획 및 시행계획상의 누수량 저감계획, 유수수량 증대계획, 중수도 보급계획, 절수설비 보급계획 등의 주요내용을 반영 수록한다.

2.11 운영관리 개선계획

◦ 수도사업 경영현황 및 문제점, 재무구조 분석 및 중장기 경영개선계획, 수도요금 현실화계획 등을 제시한다.

◦ 실무종사자를 대상으로 한 상수도관련 전문교육 및 훈련계획을 수립한다.

◦ 환경부에서 추진중인 상하수도 정보화 장기종합계획을 반영하여 단계별 정보화 추진계획을 수립한다.

◦ 상수도시설 운영관리의 효율화 및 최적화를 위한 통합운영관리체계 및 자료의 전산관리체계 구축방안을 수립하고 단계별 운영계획을 수립한다.

◦ 상수도시설의 설비 및 시스템을 효율적으로 운영할 수 있도록 단계별 유지관리시스템 구축 방안을 수립‧제시한다.

◦ 단계별 사업시행에 따라 예상되는 업무량 및 업무성격을 검토하여 기구정비에 대한 방안을 수립‧제시한다.

2.12 기술진단 계획

◦ 기술진단 계획은 성남시의 과거 기술진단 이력 및 개량계획 등을 종합적으로 검토하여 향후 수행해야할 수도시설기술진단, 관망진단, 안전진단의 범위, 시기 등을 계획 제시한다.

2.13 재해대책

◦ 상수도 관리 중 예상되는 각종 재해에 대한 예방, 대처, 복구계획 및 지역 주민 홍보계획을 수립한다.
(수질사고대책, 비상급수대책, 내진대책, 동절기 대책, 기타 안전 관리 대책)

2.14 사업시행 및 재정계획

◦ 상수도사업의 시행은 재정현황, 사업시행 우선순위 등을 고려하여 사업효과가 가장 높은 사업부터 시행한다.

◦ 사업별로 구분하여 단계별로 사업비 및 유지관리비를 산출한다.

◦ 사업의 시급성, 경제성, 재정능력을 감안하여 단계별로 사업시행 우선순위를 결정한다.

◦ 환경부 상수도사업 예산지원체계를 기준으로 재정계획을 수립하고 소요재원은 국고, 지방비 등으로 구분하여 산정한다.

2.15 기타 과업내용

◦ 본 과업에 명시되지 않은 사항은 환경부 발행 수도정비 기본계획 수립 지침을 근거로 작성하고, 경미하거나 통상 관계되는 사항은 우리시의 지시에 따라 과업을 수행하여야 하며, 본 과업을 수행함에 있어 업무 추진시 필요한 각종 협력사항에 대하여 적극 협조하여야 한다.

3.0 과업성과품 제출

◦ 수도정비기본계획(안) 보고서	5부

◦ 수도정비기본계획(안) 보고서 부록	5부

◦ 수도정비기본계획 보고서	20부

◦ 수도정비기본계획 보고서(요약)	20부

◦ 수도정비기본계획 보고서 부록	20부

◦ 상수도시설계획평면도 (1/25,000~1/50,000)	20부

◦ 계획 배수관망도 (1/2,500~1/5,000)	20부

◦ 계획 배수관망 수리계산서	20부

◦ 기타 관련자료	1식

◦ 성과품 CD	1식

4.0 과업수행 예정공정표

공 종	과 업 기 간 (월)																				비고
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10
Ⅰ. 수도정비기본계획 수립
1. 기초조사
2. 기본사항의 결정
3. 시설확충계획
4. 시설개량계획
5. 상수원확보 및 개발계획
6. 상수도수질관리계획
7. 상수도수요관리계획
8. 운영관리개선계획
9. 기술진단계획
10. 재해대책
11. 사업시행 및 재정계획
Ⅲ. 성과품 작성