2010년도

제주외항 철재부두 실시설계용역 설계서

2010. 2

2010년 2월 설계	설계자		심사자		담당		과장		국장
2010년도 제주외항 철재부두 실시설계용역 예산내역서 ○ 용역개요 : 실시설계 용역 1식 ○ 총용역액 : 902,318,000원 (부가세 81,312,812원 포함) (손해배상보험료 7,877,061원 포함)

Ⅰ. 설 계 설 명 서

1. 설계설명서

1.1. 용 역 명 : 제주외항 철재부두 실시설계용역

1.2. 과업의 목적

본 과업은 제주외항을 이용하는 화물선의 대형화 추세에 따라 2만톤급 철재부두 1선석을 추가 확충하여 항만의 유통기능 제고 및 물류비용의 절감을 통한 항만활성화를 도모하고, 제주외항 항만시설축조를 위한 실시설계를 수행하는 데 그 목적이 있음.

1.3. 과업의 위치

제주특별자치도 제주시 제주외항 일원

1.4. 과업의 범위

(1) 기초자료 조사

◦ 자연조건조사 : 기상, 해상 지형 등

◦ 입지여건조사 : 인문 ․ 사회, 산업 및 경제, 육 ․ 해상 수송망, 동력 및 용수 등

◦ 항만현황 및 공사여건 조사

◦ 관련계획 및 관련 용역조사

(2) 현지조사

◦ 수심측량

◦ 지반조사 및 시험 : 9공(해상 9공)

◦ 공사재료원 및 작업장 조사

(3) 수치모형실험

◦ 항내정온도 검토

◦ 해수유동실험

◦ 오염물질확산실험

◦ 해수교환실험

(4) 사전재해영향성 검토

(5) 실시설계

◦ 접안시설 : 210m

◦ 호안시설 1식

◦ 부대시설 1식

1.5. 과업기간

착수 일로부터 10개월간으로 한다.

1.6. 시행방법

본 설계도서에 의거 도급으로 시행한다.

1.7. 설계변경조건

(1) 과업범위 및 내용의 증·감이 있는 경우

(2) 천재지변 기타 불가항력적인 사유로 변경이 불가피할 때

(3) 기타 발주처에서 필요하다고 인정될 때

Ⅱ. 과 업 지 시 서

【목       차】

1. 일반사항

1.1 과업수행의 기준

1.2 각종 기술기준의 적용

1.3 공사비산정 적용기준

1.4 제출물

1.5 참여기술자

1.6 과업지시서의 해석

1.7 과업추진에 대한 일반사항

1.8 과업수행결과에 대한 책임

1.9 국제입찰에 대비한 설계도서 작성

1.10 하도급 시행

1.11 위반행위에 대한 조치

1.12 보고사항

1.13 과업완료후의 보완요청 등

1.14 성과품의 소유나 저작권

1.15 보안대책

1.16 외국인 고용

1.17 용역 손해배상 공제

1.18 기타사항

2. 기초자료 조사

2.1 자연조건 조사

2.1.1 공통사항

2.1.2 기상자료

2.1.3 해상자료

2.1.4 지형조사

2.2 현지조사

2.2.1 일반사항

2.2.2 수심측량

2.2.3 지반조사 및 시험

2.2.4 지장물 및 지하매설물 조사

2.2.5 재료원 조사

2.2.6 공사용 작업장 조사

2.3 입지여건 조사

2.3.1 일반사항

2.3.2 인문․사회현황

2.3.3 산업 및 경제현황

2.3.4 동력 및 용수현황

2.4 항만현황조사

2.4.1 일반사항

2.4.2 항만의 개요

2.4.3 항만의 특성

2.4.4 항만시설 현황

2.4.5 항만이용 현황

2.5 관련계획 검토

3. 기 수행계획 검토

4. 수치모형실험

4.1 항내정온도 검토

4.2 해수유동실험

4.3 오염물질확산실험

4.4 해수교환실험

5. 사전재해영향성 검토

6. 실시설계

6.1 공통사항

6.2 공법 및 단면선정

6.3 공법선정의 한계성 검토

6.4 구조계산

6.5 세부수량 및 공사비 산출

6.6 건설계획 수립

6.7 관련 서류등 기타자료 수집․작성

6.8 설계도서의 작성

6.9 실시설계 분야별 세부수행 기준

6.9.1 콘크리트 설계기준강도

6.9.2 철근콘크리트 구조물

6.9.3 접안시설

6.9.4 호안시설

6.9.5 부대시설

6.9.6 관련서류 및 기타자료 수집․작성

6.9.7 종합평가 및 건의

7. 설계도서 작성방법

7.1 공통사항

7.2 설계도 작성

7.3 공사시방서 작성

8. 성과품 제출

1. 일반사항

1.1 과업수행의 기준

(1) 용역과업수행은 이 “과업지시서”와 “과업수행계획서”에 의하여 시행하여야 한다.

(2) 수급인은 우선적으로 최신의 전문기술 지식을 활용하여야 하며, 용역성과가 발주청에 최대이익을 줄 수 있도록 과업을 수행하여야 한다.

(3) 수급인은 이 과업의 수행결과에 따라 산출된 공사비가 설계누락 또는 과다계상이 되지 않도록 하여 공사 시공시 이로 인한 분쟁이 발생되지 않도록 하여야 한다.

1.2 각종 기술기준의 적용

(1) 정부의 제반규정과 표준시방서, 설계기준 등 객관적이고 공신력 있는 국내의 기준을 적용하여 시행하여야 하며, 외국의 기준 등을 이용하였을 때에는 발주자가 알 수 있도록 그 인용부분 및 자료출처를 명확히 하여야 한다.

(2) 과업수행 중 사용되는 모든 자료는 그 출처를 밝혀 객관성이 확보되도록 하여야 한다.

(3) 조사, 계획, 분석 및 보고서 작성 등에 사용하는 단위는 C.G.S 단위를 기준으로 한다.

1.3 공사비산정 적용기준

(1) 노임단가 : 용역준공시의 대한건설협회, 엔지니어링진흥협회, 대한측량협회 등에서 조사공표한 노임 (이월시는 성과품 납품 당해연도분 반영)

(2) 환    율 : 용역준공기준 해당연도의 전신환매도율 적용(이월시는 성과품 납품 당해연도분 반영)

(3) 중기사용료 : 용역준공기준 해당 연도의 조달청 중기사용료

(4) 자재단가 : 용역준공기준 최근 조달청 가격정보지 또는 물가정보지 단가 적용

(5) 수량 및 단가산출 : 정부제정 건설공사 표준품셈 및 국토해양부부의 적산기준, 실적공사비 등에 의하여 산출(이에 의할 수 없는 경우는 적정단가를 감독자와 협의하여 산출)

1.4 제출물

(1) 과업수행조직표

① 수급인은 과업에 참여할 사업책임기술자 및 분야별 책임기술자를 담당과업수행 분야별로 구분 작성하여 용역 착수후 7일 이내에 발주청에 제출하여야 한다.

② 과업수행에 필요한 분야구분은 감독자와 협의하여야 하며 다음을 기준으로 한다.

가. 항만 및 해안분야

나. 토목구조분야

다. 토질 및 기초분야

라. 기타 측량, 시공, 도시계획, 교통, 전산분야 등 이 과업수행에 필요한 분야

(2) 과업수행계획서

① 수급인은 본 용역에 대한 수행계획, 수행방법 등에 관하여 과업수행계획서를 작성, 착수후 7일 이내에 발주청에 제출하여야 한다.

② 과업수행계획서는 과업 단계별로 구분하여 작성하고 단계별 주요 검토사항 및 인원투입계획, 공정계획이  포함되어야 한다.

(3) 세부조사시행계획서

① 수급인은 이 과업지시서상의 “현지조사” 항목에서 규정한 세부조사시행계획서를 발주청에 제출하여야 한다. 다만, 세부조사 계획서는 당해 조사가 착수되기 전까지 제출하도록 한다.

② 세부조사시행계획서는 감독자와 협의하여 작성하여야 한다.

1.5 참여기술자

(1) 사업책임기술자는 과업지시서 및 계약서에 명시된 업무와 계약조건을 충실히 이행하여야 하며, 모든 중요한 사항에 대하여 감독자와 협의하여야 한다.

(2) 용역에 종사하는 기술자는 과업수행계획서에 일치되게 투입되어야 한다. 단, 추가투입이나 사망, 지병, 기타사유로 교체가 불가피할 경우는 교체자의 자격 및 경력에 대하여 발주청의 사전승인을 득하여야 한다.

(3) 참여기술자가 과업수행에 부적당하다고 판단되거나 태만하다고 인정될 때에는 해당자의 교체를 요구할 수 있고 수급인은 이에 응해야 하며, 이로 인한 용역과업의 지연이나 용역기간의 연장은 인정되지 않는다.

(4) 건설기술관리법 관계규정에 의거 설계용역 참여기술자의 업무내용 등을 구체적으로 보고서에 기재하여야 한다.

1.6 과업지시서의 해석

과업지시서상의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 발주청과 수급인이 의견을 달리하는 경우는 신뢰를 가지고 최대한 서로 협의하여 결정하되 협의가 되지 않을 경우는 발주청의 해석에 따르는 것으로 한다.

1.7 과업추진에 대한 일반사항

(1) 감독자가 수급인의 귀책사유로 과업수행이 지연된다고 판단하여 지시할 경우는 지시에 따라 지체없이 과업이 예정대로 추진되도록 인력, 장비 등을 추가하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

(2) 이 과업지시서에 누락되었더라도 과업목적을 달성하기 위하여 당연히 필요한 사항은 감독자와 협의하여 수급인의 부담으로 시행하여야 한다.

1.8 과업수행결과에 대한 책임

(1) 발주청의 협의를 거친 사항이라도 설계상의 잘못이 발견될 시에는 추가비용의 청구없이 수급인의 책임하에 수정․보완하여야 한다.

(2) 용역 수행결과의 잘못으로 인하여 중대한 재난이 발생하거나 설계 잘못으로 인하여 발생되는 분쟁은 수급인이 책임을 져야 한다.

1.9 국제입찰에 대비한 설계도서 작성

공사의 계약이 국제입찰대상일 경우에는 국제입찰에 대비하여 각종 설계도서를 작성하여야 한다.

1.10 하도급 시행

(1) 수급인이 하도급을 시행하고자 하는 경우에는 발주청과 협의하여 승인을 얻어야 하며, 계약 체결시는 계약내용을 발주청에 제출하여야 한다. 또한, 하도급계약내용을 변경하고자 하는 경우에도 같다.

(2) 과업을 수행함에 있어 필요한 경우 타 전문기관을 활용할 수 있으며, 이 경우 사전에 발주청의 승인을 득하여야 한다.

(3) 발주청의 승인을 얻지 않아도 되는 하도급의 범위는 다음과 같으며 이 경우에도 하도급 계약내용(제(4)항 참조)은 계약체결일로부터 3일이내에 발주청에 제출하여야 한다.

① 지반조사 및 시험

② 각종 측량․조사

③ 제도 및 도면작성 등

④ 수량내역서 작성 및 견적업무

(4) 하도급의 승인요청을 하는 경우 또는 하도급계약내용 변경을 위하여 승인요청을 하는 경우에는 다음 사항을 명백히 하여야 한다.

① 계약건명

② 계약금액

③ 하도급 부분 및 내역

④ 하수급인

⑤ 계약이행기간

⑥ 하도급사유(하수급인 및 기타 하도급조건 변경시에는 변경하는 사유)

⑦ 계약서 사본(계약체결후 제출)

⑧ 기타 참고사항

(5) 수급인은 하수급인으로 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자로 선정하여야 하며 법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가등을 보유한 자만이 용역을 할 수 있는 경우에는 해당면허 또는 허가등의 자격요건을 구비한 자로 선정하여야 한다.

(6) 수급인은 하도급부분에 대하여 기성고지출이 되었을 때에는 지체없이 하수급인에게 대금을 지급하여야 한다.

(7) 하도급에 의해 수행된 용역성과에 대해서도 발주청에 대한 책임은 수급인이 져야 한다.

1.11 위반행위에 대한 조치

(1) 다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 계약위반 행위로 간주하여 계약 해지 또는 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

① 제반지시사항을 특별한 이유없이 기한내에 이행치 않을 때

② 계약기간내에 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

③ 과업수행상 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

④ 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급 주었을 때

(2) 발주청이 계약위반 행위로 간주하여 계약해지 등의 조치를 취하고자 할 때에는 조치전에 2회이상 수급인에게 과업의 성실한 수행을 요청하여야 한다.

1.12 보고사항

(1) 공정보고

착수 개시일로부터 매월 말일 정기공정보고를 하여야 하며 보고양식은 감독자와 협의하여 정하도록 한다.

(2) 중간보고 및 최종보고

① 1회이상의 중간보고와 최종보고회를 실시하여야 하며, 보고횟수 및 보고시기는 발주처와 사전 협의하여 결정하여야 한다.

② 감독자가 특별히 필요하다고 판단하여 보고회의를 개최토록 지시하는 경우 수급인은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

③ 수급인은 과업완료 최소 1개월 이전에 최종보고서(안)을 제출하여야 하며 발주청에서 수정 또는 보완을 요구하는 경우 그 내용을 검토하여 수정․보완하여야 한다.

1.13 과업완료후의 보완요청 등

과업완료 후라도 이 용역에 관련된 사항에 대하여 재검토 또는 보완이 필요하여 발주청의 요청이 있을 때에는 별도의 비용청구 없이 재검토 또는 보완하여 제출하여야 한다.

1.14 성과품의 소유나 저작권

(1) 수급인은 용역수행으로 인하여 발생한 각종 개발 및 조사자료와 도면, 시방서, 견적서, 입찰서류 및 원도등 일체의 성과품을 발주청의 소유로 하고 발주청의 승인 없이는 제3자에게 제공하거나 이 용역외의 목적에 사용할 수 없으며 준공 시 발주청에 정리 제출하여야 한다.

(2) 본 용역 계약에 의해 수행된 성과물에 대한 저작 재산권 일체와 2차적 저작권 또는 편집 저작물의 작성권은 발주처가 소유하며, 발주처는 정책상 필요시 용역성과물의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다.

1.15 보안대책

(1) 이 과업을 위하여 수집된 자료 및 과업수행의 결과에 대하여 철저한 관리, 보안을 유지하여야 하며 특별히 보안유지를 위하여 중요하다고 인정되는 서류와 자료 및 결과는 이의 누설, 분실, 도난을 방지하기 위하여 보안관리책임자를 지명하여 관리토록 하여야 한다.

(2) 용역 참여인원에 대한 서약서를 발주청에 제출하고 보안교육등 보안조치를 강구토록 하며, 용역 참여인원의 변경시 과업내용의 사전유출 방지와 인수인계를 철저히 하여야 한다.

1.16 외국인 고용

(1) 본 용역 수행상 필요하여 외국인 전문기술자를 고용했을 경우 그들의 출입국 상황을 발주처에 통지하여야 하며, 고용된 외국인은 체류기간중 국내법을 준수하여야 한다.

(2) 외국인 전문기술자는 본 과업에 대하여 충분한 학식과 경험이 있는 자로 하며, 발주처가 부적당하다고 판단할 때에는 교체를 명할 수 있고, 용역사는 이에 응하여야 하며, 그에 따른 일체의 소요 비용을 부담하여야 한다.

1.17 용역 손해배상 공제

(1) 건설기술 관리법 시행령 제37조의3제3항 및 건설교통부 고시 “설계․감리 등 용역손해보험 또는 공제 업무요령”제2001-328호(2001.12)규정에 의하여 수급인은 설계, 감리 등 용역손해배상보험 또는 공제에 가입하고 용역을 완료하기 전까지 공제증서를 제출하여야 한다.

(2) 보험료 또는 공제료는 건설교통부 고시 “설계․감리 등 용역손해보험 또는 공제 업무요령”제2001-328호(2001.12)의 제9조에 의하여 산정하고 계약금액의 증감으로 인하여 변경된 경우에는 공제가입금액을 정산하여야 한다. 다만, 증감된 순계약금액이 당초 보험 또는 공제가입금액의 100분의 10이내인 경우에는 그러하지 아니하다.

1.18 기타사항

(1) 용역보고서외에 차후 이 용역과업에 의한 공사추진시 필요로 하는 서류나 자료가 있을 경우에는 별도로 작성 제출하여야 한다.

(2) 이 용역수행에 있어 제3자의 권리대상으로 되어있는 특허권 등을 사용할때에는 수급인은 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

(3) 설계도서의 작성은 “항만건설통합정보시스템(Port-CIS)"의 원활한 운영을 위하여 ”항만건설사업의 용역 및 성과품 설계도서 작성지침서“에 의거하여 작성하여야 한다.

(4) 과업지시서에 의한 모든 성과품은 원고가 작성되면 감독자의 승인을 득한 후 조판에 임하고 성과품의 편집, 인쇄방법 등은 별도로 사전에 협의하여야 하며, 검토서, 계산서, 각 도면에는 책임기술자, 검토자, 작성자의 서명이 있어야 한다.

(5) 현지조사 및 사후 증빙자료로 이용될 내용 등 용역관련 주요사항을 사진 촬영하여 사진첩 2부를 작성, 원판(필름)과 함께 용역 완료시 제출하여야 한다.

(6) 수급인이 공동으로 용역과업을 수행할 때에는 과업의 효율적수행과 작업능률 향상을 위해 발주청의 요구가 있을 때에는 합동사무실을 설치하여야 하며 설치위치 등은 발주청과 협의한다.

2. 기초자료조사

2.1 자연조건 조사

2.1.1 공통사항

(1) 실시설계를 위한 자연조건조사를 실시하여야 하되 기존에 조사된 내용 또는 관련된 적정자료가 이를 이용할 수 있다.

(2) 자연조건조사는 이 절의 아래 항목의 내용에 따라 정리되어져야 한다.

2.1.2 기상자료

(1) 과거 20년간의 기상자료를 수집, 이를 다음 사항별로 정리․분석하여 개발계획 및 이 과업의 수행에 이용하여야 한다.

① 풍향별(16방위)로 풍급별 발생빈도를 연간, 월별, 계절별로 분석․정리하고 주풍향, 설계풍향의 풍속등을 조사하여야 한다.

② 과거 발생했던 태풍에 대하여 발생지역, 평균 최대풍속, 지속시간 및 당시의 기압 등을 조사하여야 한다.

③ 연간, 월별 강우량 및 시간강우 강도를 분석 정리하여야 한다.

④ 연간, 월별, 계절별 안개발생일수 및 농도 등을 조사․정리하여야 한다.

⑤ 연간, 월별 최고, 최저 및 평균기온을 정리하여야 한다.

(2) 수급인은 조사․정리된 기상자료와 해상자료 등을 토대로 육상 및 해상작업일수를 추정하되 공사기간 부족으로 부실공사가 발생되지 않도록 하여야 한다.

2.1.3  해상자료

(1) 계획 대상항만에서의 조위, 조류, 파랑 등에 대한 기존자료를 조사․분석하여야 한다.

(2) 조위자료는 기존의 인근 검조소에서 관측된 조석자료를 시공에 적용할 수 있도록 분석 정리하여야 하며, 대상수역 및 인근수역의 기존 조류자료를 수집․분석하여 대상수역의 대표적인 조류방향 및 유속을 정리하여 시설물 배치계획 및 구조물 설계에 적용하여야 한다.

2.1.4 지형조사

(1) 계획대상지의 인근 지역에 대한 개략적인 지형을 조사하고 계획대상지의 지정학적인 위치와 특성 등을 파악․정리하여야 한다.

(2) 계획대상지의 항만에서의 위치와 주변시설물의 위치를 조사․정리하여야 하며, 시설물의 배치 및 구조물 설계시에 이를 이용하여야 한다.

2.2 현지조사

2.2.1 일반사항

(1) 이 과업지시서의 과업 범위에 포함되어 있거나, 과업의 목적 달성을 위해서 세부적인 조사가 필요하다고 판단되거나 또는 발주자가 필요하다고 판단하여 지시할 때에는 실시설계를 위한 조사를 실시하여 다음의 내용에 따라 시행하고, 이를 보고서에 정리하여야 한다.

(2) 현지조사는 관련 표준시방서, 항만공사 및 어항공사 전문시방서에 따라야 하며, 세부조사 시행계획 수립시 그 내용을 반영하여야 한다.

(3) 기존에 조사된 내용을 검토하여 실시설계에 필요한 현지조사 시 이를 최대한 이용하여야 하며 조사위치와 범위, 방법, 사용장비, 조사반 구성 등 조사에 필요한 구체적인 내용을 포함한 세부조사시행계획서를 발주청에 제출하여 승인을 얻은 후 시행하여야 한다.

(4) 세부조사시행계획서를 제출하여 승인을 득하여야 하는 조사는 지형측량, 수심측량, 지반조사 및 실내시험 등이며 기타 과업수행상 필요한 조사가 있어 감독자가 지시하는 경우에도 세부조사시행계획서를 제출하여야 한다.

2.2.2 수심측량

(1) 수심측량은 기존에 수행된 수행한 내용을 검토하여 이를 최대한 이용하여 경제적이고 효율적으로 실시하여야 하며 검토내용을 보고서에 수록하여야 한다. 또한 계획대상지역이나 그 인근지역에 대한 수심측량 자료가 있을 경우에는 이를 비교 활용하여야 한다.

(2) 측량구역은 발주청이 이에 대한 평면도를 제시하였을 경우에는 이에 따라야 하며 제시된 평면도가 없을 경우에는 감독자의 지시에 따르되 필요시 감독자와 협의하여 구역을 조정할 수 있다.

(3) 수심측량은 음향측심기의 사용을 원칙으로 하고 장애물이나 측량선의 진입이 곤란한 곳에서는 감독자와 협의하여 육상수준측량 또는 Lead측량을 실시할 수 있다.

(4) 측심간격은 20m로 하되 수심측량의 목적과 구조물의 중요도, 해저의 기복 및 종류 등에 따라 감독자와 협의하여 결정하여야 한다. 대상구조물의 위치 및 중요성에 따라 필요시 감독자와 협의하여 그 간격을 변경할 수 있다.

(5) 보조삼각점의 위치평면은 직각좌표로 도면 또는 보고서에 명시하여야 하며, 필요시 보조삼각점 중 일부는 감독자와 협의하여 지정하는 표지로 설치하고 향후 공사용 기준점으로 이용할 수 있도록 조위와 연계하여 T.B.M.을 설치한 후 위치평면도에 표시하여야 한다.

(6) 수심측량은 발주청에 제출한 세부조사시행계획서에 따라야 하며 과업의 증감이 있을때에는 예산의 범위 내에서 정산할 수 있다.

2.2.3 지반조사 및 시험

(1) 지반조사 및 시험은 기존에 수행된 내용을 검토하여 이를 최대한 이용하여 경제적이고 효율적으로 실시하여야 하며 검토내용을 보고서에 수록하여야 한다. 또한 계획대상지역이나 그 인근지역에 대한 지반조사 자료가 있을 경우에는 이를 비교 활용하여야 한다.

(2) 지반조사는 발주청에 제출한 세부조사시행계획서에 따라야 하며 과업의 증감이 있을 때에는 예산범위내에서 정산을 할 수 있다.

(3) 해상보링 조사위치는 발주청에서 평면도를 제시하였을 경우에는 이에 따라서 실시하여야 하며, 제시된 평면도가 없을 경우에는 적정한 위치를 선정하여 실시하고 그 위치를 평면도에 표시하여 세부조사 시행계획서 수립전 발주청과 협의후 시행하여야 한다.

(4) 지반조사를 위한 시추공의 간격은 기존자료, 지층탐사 결과 등에 따라서 필요한 곳에 실시하되 발주청과 협의하여 결정하여야 하며 협의시에는  다음의 기준을 참고하여야 결정하여야 한다.

① 성층상태가 수평 연직방향으로 비교적 균일한 경우 : 100~200m

② 성층상태가 복잡한 경우 : 50~100m

(5) 시추조사의 위치변경이나 시추개소의 증감이 필요한 경우에는 감독자와 사전협의후 승인을 받아 시행하여야 한다.

(6) 조사를 실시한 위치는 평면직각 좌표로 시추조사성과도에 표시하여야 한다.

(7) 지반조사는 토질전문기술자의 입회하에 실시하고 수시로 조사결과를 감독자에게 보고하여야 한다.

(8) 지층변화에 따른 시추심도의 변경 및 암반층의 시추심도는 구조물 기초설계에 필요한 심도 등을 고려하여 결정되어야 하므로 세부조사시행계획서에 이에 관한 내용이 포함되어야 하며 시추중에 예측치 못했던 지층이 있는 경우에는 감독자와 협의한 후 작업을 실시하여야 한다.

(9) 자연시료 채취는 채취가능한 위치에 대하여 KSF 2317 규정에 의하고, 샘플은 지반상태에 가장 알맞은 것을 사용하여야 한다.

(10) 표준관입시험은 1.5m마다 1회씩 실시하는 것을 원칙으로 하되, 토성이 변할 때마다 시료를 채취 필요한 토질시험을 실시하여야 하며, 토질 특성상 표준관입시험이 불필요하는 등 시험횟수의 조정이 필요하다고 인정될 경우에는 감독자와 협의하여 시행한다.

(11) 채취된 시료에 대한 시험은 다음의 토질시험을 실시하되 공사재료원 등의 파악등 추가적인 시험은 감독자와 협의하여 시행한다.

(12) 특히 점성토일 경우는 흐트러지지 않은 시료를 채취하여 흙의 전단강도시험과 압밀시험등을 실시, 흙의 공학적 특성을 파악하여 구조물 기초설계에 차질이 없도록 하여야 한다.

(13) 지반조사의 결과는 토질주상도, 토질단면추정도, 지지층 심도분포도, 연약층 분포도, 토질시험 결과표, 토질분류도 및 구간별 연약지반 토질정수 분석자료등으로 정리하여 토질조사보고서 또는 관련보고서에 수록하여야 한다.

(14) 과업수행의 목적달성을 위해서 추가적으로 시추조사를 실시하여야 하나, 발주청의 예산 등의 이유로 추가조사를 실시하지 못할 경우에는 이 내용을 보고서에 수록하여 시공시에 이를 참고하도록 하여야 한다.

2.2.4 지장물 및 지하매설물 조사

(1) 설계대상 지역에 지장물 및 지하매설물이 있는지 그 여부를 조사하여야 하며, 지장물 및 지하매설물 이설계획항목에서 그 이설방안을 제시하여야 한다.

(2) 조사항목은 다음과 같다.

① 공공시설물

② 전기 및 통신시설물

③ 가스, 송유관등

④ 상하수도시설물 및 기존 구조물

⑤ 기타 공사에 지장된다고 판단되는 시설물

2.2.5 재료원조사

(1) 토취장이 필요한 경우에는 토취장에 대한 제반조건 및 이용여부를 검토하여 감독자와 협의하여 이용할 토취장을 선정하여야 한다.

(2) 골재원이 필요한 경우에는 골재원의 위치, 매장량, 골재종류 등을 검토하여 공사시행시 이용할 골재원을 선정하여야 한다.

(3) 석산이 필요한 경우에는 계획구역 주변의 석산 위치 및 암석의 종류, 암질상태, 표토층의 두께, 품질, 가용매장량 및 개발가능여부, 민원사항 등을 분석하여 공사시행시 이용할 석산을 감독자와 협의하여 선정하여야 한다.

(4) 아스팔트 콘크리트 또는 레미콘이 사용될 경우는 인근 공장 등에 대하여 검토하고 이용가능한 공장을 선정하여야 하며, 이 조사에는 항만구조물의 내구성 향상을 위하여 혼화제를 이용한 고 내구성 콘크리트 공급능력에 관한 내용도 포함되어야 한다.

(5) 기타 공사시행을 위하여 필요하다고 인정되거나 감독자의 지시가 있을 경우는 이에 대하여 조사하여야 한다.

2.2.6 공사용 작업장 조사

본 공사 시행을 위한 작업장(적출장, 각종 제작장 등)의 소요 규모를 판단하고, 이에 필요한 작업장으로 이용 가능한 부지를 조사하여 선정하고 필요시 신규작업장 조성 규모를 산정하여야 한다.

2.3 입지여건 조사

2.3.1 일반사항

기본설계 수립을 위한 용역이 시행되지 않았거나 기타 다른 이유로 계획대상지역에 대한 입지여건조사가 실시되지 않았을 경우에는 관련자료 등을 이용하여 입지여건조사를 시행하여야 한다.

2.3.2 인문․사회현황

계획항만 배후지역의 인구 및 가구, 교육시설, 문화재 등을 조사하여 정리하고 배후지의 인문․사회현황이 항만개발에 미치는 영향 및 항만개발이 이에 미치는 영향을 분석하여야 한다.

2.3.3 산업 및 경제현황

(1) 계획대상항의 직접 ․ 간접 세력권의 범위, 배후지역의 산업 및 경제현황을 상세히 조사․정리하여야 한다.

(2) 조사된 산업 및 경제현황을 통하여 항만 개발계획과 연계 ․ 검토하여 당해지역의 산업 및 경제여건과 항만 개발계획이 조화되도록 하여야 한다.

2.3.4 동력 및 용수현황

(1) 배후지역의 동력사용과 공급시설현황을 조사하여야 한다.

(2) 상수도와 하수도 현황을 조사․정리하여야 한다.

2.4 항만현황조사

2.4.1 일반사항

기 수행계획시 조사된 항만현황조사의 내용을 검토하여 그 내용을 요약ㆍ정리하여야 한다. 단, 상황의 변동 등으로 조사내용의 수정이 필요하거나 부분적으로 재조사가 필요한 경우에는 이에 대한 부분조사를 실시하여야 한다.

2.4.2 항만의 개요

계획대상 항만의 연혁과 발전과정, 항계 등을 조사하여야 하며 그 내용을 요약ㆍ정리하여야 한다.

2.4.3 항만의 특성

(1)  수산업, 교통, 관광, 주민생활 등, 기타 관련있는 사항 등과 연계하여 종합적으로 검토 요약하여야 한다.

(2)  항만의 특성에는 사회․경제적 측면에서의 위치적 특성 등이 포함되어야 하며, 기능적인 관점에서의 특성을 분석하여 그 내용이 포함 되도록 하여야 한다.

2.4.4 항만시설 현황

(1) 기 수행과업으로 조사된 기존의 항만시설에 대한 관련내용을 검토하여 조사․정리하여야 한다.

① 수역시설

② 외곽시설

③ 접안시설

④ 기능시설

⑤ 문화․복지시설 및 관광․휴게시설 등 기타시설

(2) 항만시설 현황에는 건설 및 계획중인 항만시설 현황이 포함되어 조사되어야 한다.

(3) 대상항만의 취약시설이나 문제점 등을 검토하여 시설관리 및 운영의 효율성 측면에서의 종합의견을 제시하여야 한다.

2.5 관련계획 검토

(1) 기본계획 수립 및 과거 용역시 검토되었다 하더라도 변경 또는 취소된 계획이 있으면 그 내용을 보고서에 수록하여야 하며, 변경 또는 취소된 계획이 없고 기본계획 및 과거 용역시 검토된 내용이 적정하면 그 내용을 요약․정리하여야 한다.

(2) 계획 지구내 및 주변지구의 항만 관련계획 또는 건설중인 공사를 조사ㆍ정리하여야 한다.

3. 기 수행계획 검토

(1) 기 수행계획 내용중 본 과업과 관련되어 있는 항목(평면배치계획, 표준단면, 공법, 설계파, 지반조사 내용 등)은 세부적으로 검토하여 그 적정여부를 판단하여야 한다.

(2) 기 수행계획 당시의 여건과 상황변화로 기존의 계획 내용 조정이 필요할 경우에는 구체적으로 그 내용을 조사하여 검토 ․ 분석한 후 대안을 마련하고 발주청의 승인을 득하여 실시설계에 반영하여야 한다.

(3) 공법선정의 적정성 검토

① 기 수행계획에서 검토ㆍ정리된 관련 공법을 재검토하고 선정된 공법의 적정성을 경제성, 안전성, 시공성 등의 관점에서 분석하여야 하며 선정된 공법이 부적합하다고 판단할 경우에는 그 사유와 대안을 요약하여 발주청에 보고하고 발주청의 지시를 따라야 한다.

② 기 수행계획에서 제시한 단면의 적정성을 검토하여 제시된 단면의 최적여부를 판단하고 그 근거를 객관적으로 제시하여야 한다.

4. 수치모형실험

4.1 항내 정온도 검토

(1) 모델은 파랑의 천수, 굴절, 회절 및 반사를 고려할 수 있는 모델을 사용하며 실험은 이상시와 평상시에 대해 실시하고 실험을 위한 입사파 조건은 기존의 용역보고서와 파랑자료 등을 분석하여 설정한다.

(2) 입사파랑의 특성을 고려하여 파랑 전파에 무리가 없도록 격자간격을 구성하며 항내 수질개선을 위해 제시되는 계획안에 대해 항내 정온도를 검토한다.

4.2 해수유동 수치모형실험

(1) 우리나라 남해안의 주요 항만설계에 적용실적이 있어 현장 적용성이 입증된 바 있는 2차원 연직적분모델 사용한다.

(2) 모델은 조석 1주기간 물입자가 이동할 수 있는 거리(Tidal excursion)를 고려하여 계산영역을 설정한다.

(3) 조석, 조류, 해저질 등의 현장조사 성과를 바탕으로 모델의 입력자료 결정 및 철저한 검증을 수행한다.

(4) 기존 연구자료 및 조석도를 분석하여 모델의 경계조건을 설정한다.

(5) 실험은 평균대조기에 대해 수행한다.

(6) 사업에 따른 조위 및 조류속 변화 분석한다.

(7) 유동장 결과는 오염확산 수치모형실험의 입력자료로 제공한다.

4.3 오염물질확산실험

(1) 공사계획에 따른 공종별 해상공사시 발생되는 부유사의 발생량을 산정하여, 공사 단계별 최대 부유사확산 범위를 예측하여야 한다.

(2) 공사시 발생 부유사가 인근 해역에 미치는 영향을 분석하고, 악 영향 예측시 저감방안을 도출하여야 한다.

(3) 모델은 흐름에 의한 오염물질의 시․공간적인 이동양상을 계산하는 2차원 연직적분 모델과 투하된 오염물질의 이동경로를 추적하여 공간적 농도분포를 산정한다.

(4) 모델의 입력자료인 시․공간별 수위 및 유속은 해수유동 모델의 결과를 이용한다.

(5) 오염확산 예측은 공사특성 등을 파악하여 확산양상 예측을 수행하고, 악영향 발생시 저감방안을 제시(공사시 공사강도 저감 및 투기시기 유도) 한다.

4.4 해수교환 실험

(1) 해수유동 실험과 연계하여 평면배치계획 수립에 따른 해수교환율 산정 및 그 효과 등을 검토한다.

(2) 해수교환율 평가 범위는 발주자와 협의하여 해수교환의 주된 영역을 설정하여 수행한다.

(3) 항만 구조물 축조 전․후의 해수교환율 범위에 대하여 실험결과를 도출하여야 한다.

5. 사전재해영향성검토

5.1 목적

사전재해영향성검토는 사업의 시행으로 인한 재해유발요인을 사전에 예측하며, 저감방안 수립을 통해 사업의 재해 위험성을 차단하고 자연재해대책법상의 절차를 적법하게 이행함으로써 사업의 원활한 추진을 도모하기 위함이다.

5.2 일반사항

(1) 본 과업의 범위는 사업시행으로 인한 재해유발요인을 예측, 평가하여 재해위험을 방지하는데 있다.

(2) 수행 과정상 필요한 현황조사에 대한 사항은 사전에 감독자와 협의하여 시행하여야 한다.

(3) 본 과업의 원활한 수행을 위하여 자연재해대책법 및 사업추진 관련 법령, 기타법령에 의한 제반사항을 충분히 검토하여야 한다.

(4) 용역완료 후 관계기관 자료 요구시 이에 협조하여야 한다.

(5) 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 관련법령의 규정 등에 의하여 필요하다고 인정하는 중요사항은 발주자와 협의하여 시행하여야 한다.

(6) 사전재해영향성검토서는 본 사업으로 인한 전반적인 재해유발요인을 도출하여 재해예방대책을 수립할 수 있는 자료가 되도록 하여야 한다.

(7) 사업시행에 따른 예측평가 및 저감방안은 총괄적으로 파악할 수 있도록 항목별로 정리하여야 한다.

5.3 세부 과업내용

○ 사업개요 파악

○ 사전재해영향성검토 대상지역 설정

○ 유역 및 재해현황 조사

○ 재해영향 예측 및 분석

○ 재해영향 저감대책

(1) 사업개요 파악

○ 사업의 배경 및 목적, 추진경위, 사업내용 등을 파악한다.

(2) 사전재해영향성 검토 대상지역 설정

○ 사전재해영향성검토 대상지역 설정은 사업시행으로 인하여 재해가 일어날 수 있는 예상지역으로 하되, 재해영향이 미치는 지역 범위는 과학적으로 예측 분석한 결과에 의하여야 한다.

○ 대상지역은 해안 및 매립지 현황 등의 현지조사 및 관련자료 조사․분석결과를 활용하여 설정하고, 그 타당성을 명시한다.

(3) 유역 및 재해현황조사

○ 유역현황조사는 유역특성, 기상 및 수문, 토질 및 지질, 재해발생현황 등에 대하여 현지조사를 원칙으로 하되 불가피하게 문헌 또는 기타자료에 의한 조사를 실시하게 되는 경우에는 가장 최근의 자료를 인용하고 본문의 해당내용 하단에 인용문헌 또는 그 출처를 표기한다.

○ 주변지역 토지이용 및 개발계획 현황 : 주변지역 개발계획의 조사는 사업지 주변지역에 재해영향을 미칠만한 규모의 사업 또는 시설물 등을 조사하여야 한다. 특히 미개발지의 경우 장래 개발계획의 유무 여부를 조사하고 장래 개발계획이 있는 경우에는 그 계획 내용에 의한 재해영향을 구체적으로 분석하여야 한다.

○ 사전재해영향성검토를 위해 해안의 측량이 필요하다고 판단될 경우에는 발주자에 의뢰하여 해안의 종․횡단 측량과 수심측량을 실시토록 한다.

○ 방재시설 현황 및 방재관련 공공계획 : 개발계획과 방재시설 현황 및 공공계획은 관련도면에 종합적으로 표시하여 작성하고 그 내용은 표로 작성하거나 간략히 기술한다.

○ 재해발생현황 및 분석 : 과거 재해영향평가 대상지역 내에 발생한 재해의 종류, 빈도 등을 기술하고 향후 재해발생의 예측 분석을 포함하여야 한다.

(4) 재해영향 예측 및 분석

○ 사업시행으로 인하여 예상되는 재해영향 요인에 대하여 객관적으로 분석하고, 사업시행전․후의 재해영향요인을 예측 평가하여 기술하되 정성적 및 정량적 분석으로 구분하여 작성한다.

① 정성적 분석

○ 정성적 분석에는 해당지역의 지형, 지질을 검토하고 주위여건과 개발상황에 따라 각종 피해가 일어날 수 있는 영향을 분석하여야 한다.

② 정량적 분석

○ 정량적 분석에는 해당지역의 해양물리현상 분석, 본 매립으로 인해 사업대상지 및 주변에 미치는 영향 등이 포함되어야 한다.

○ 공정별 사업계획 검토 등 사업시행으로 인하여 재해를 일으킬 수 있는 모든 문제점을 사업 시행전, 시행후로 구분하여 상세하게 기술하여야 한다. 특히 대상지역 소통능력을 평가하여 재해우려가 있는지를 검토한다.

(5) 재해영향 저감대책

○ 재해영향 저감방안의 수립은 사업수행에 따른 재해영향을 최소화 할 수 있도록 이에 대한 사업지구의 방지대책을 종합적으로 검토하고 검토된 대책을 사전에 제시함으로서 재해의 악영향을 미연에 방지하는 것이 그 목적이므로 재해영향 저감대책의 수렴단계에서는 현재의 기술적 경제적 수준으로 실시가능한 최선의 방안을 제시하여야 한다.

○ 재해영향 저감방안은 사업지구내에 한하여 사업의 시행중․후로 구분하여 수립하되 저감방안에 대한 여러가지 대안을 제시하고, 제시된 대안의 장단점을 비교 분석한후 이중에서 적용할 최적안을 선정하여야 하며, 그 선정 사유를 명시하여야 한다.

○ 사업시행으로 인한 재해영향을 방지하기 위한 재해영향 저감대책을 검토하고 실제로 어떤 대책을 강구하는 것이 가능한가를 제시한다.

○ 수립된 저감대책에 대하여는 그 저감효과 분석을 실시하고 사후 유지관리 계획을 제시하여야 한다.

6. 실시설계

6.1 공통사항

(1) 구조물의 설계는 국토해양부에서 정한 항만 및 어항설계기준에 의하여 실시하여야 하며 항만공사표준시방서 및 항만․어항공사전문시방서 등을 참고로 실시하여야 한다.

(2) 구조계산 등에 컴퓨터 소프트웨어를 사용하였을 때에는 사용 소프트웨어에 대한 설명과 함게 입력 데이터, 출력내용, 제한조건 등을 상세히 수록하여야 한다.

(3) 기초구조물 설계시에는 활동(원호활동 포함), 전도, 지지력 등을 검토하여야 하며 구조계산서에는 검토과정을 알 수 있도록 상세히 수록하여야 한다.

(4) 구조물 설계시 내진설계 적용여부를 검토하여야 한다.

(5) 항만구조물에 대한 설계는 강도설계법을 사용함을 원칙으로 한다. 다만, 구조물 또는 재료의 특성상 강도설계법을 사용할 이유가 없다고 판단될 경우에는 감독자와 협의하여 허용응력설계법을 사용할 수 있다.

(6) 해양콘크리트 구조물의 내구성 향상을 위하여 혼화재를 이용한 고내구성 콘크리트 사용을 우선적으로 검토하여 설계하여야 한다.

(7) 비교안 작성

① 중요 구조물의 설계는 각종 자료를 수집분석 검토하여 5개 이상의 구상안을 작성하여야 하며 그 중 가장 경제적이고 내구성이 있는 안을 선정할 수 있도록 3개안 이상(합리적인 비교를 위하여 각각의 안은 그 자체적으로 가장 경제적이고 안전한 최적의 안이 되어야 한다)을 선택하여 이에 대한 구조계산 및 공사비, 장단점, 기타 필요한 사항 등을 검토․작성하여 1개안을 선정하여야 한다.  단, 구상안의 수는 공사의 규모 등에 따라 감독자와 협의하여 조정할 수 있다.

② 각각의 비교안 검토시에는 유지관리비를 포함한 경제성 분석이 이루어져야 한다.

(8) 사전 협의사항

① 용역사는 과업진행중 다음과 같은 세부사항은 이 과업지시서의 다른 항목에 특별한 규정이 없더라도 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

가. 구조물의 위치, 형식 및 규모

나. 적용공법

다. 구조물의 표준단면(공사비를 산정을 위한 단면 포함)

라. 도로의 노선, 표고, 포장설계

마. 중요 건설자재

바. 적용할 시공법등

② 세부사항에 대하여 발주처와 협의를 하였더라도 하자가 발생할 시에는 용역사의 책임이 면책되는 것은 아니다.

6.2 공법 및 단면선정

(1) 수급인은 과업대상시설을 경제적으로 건설하기 위하여 관련 공법에 대하여 최신 공법을 포함한 국내의 여러 공법 및 외국에서 사용 또는 개발된 최신 공법 등을 종합적으로 조사하여 그 장단점 및 시공조건, 시공사례 등을 검토․정리하여야 한다.

(2) 공법선정후 구조물의 표준단면을 결정하여야 하며 표준단면은 그 구조물 전체 단면을 대표할 수 있도록 적절하게 선정하되 구조계산에 관한 내용은 “구조계산”항목을 따라야 한다.

(3) 수급인은 시공을 위한 세부적인 구간별 단면을 결정하여야 하며 세부단면 결정시에는 과업대상지역의 토질 및 지반조건, 수심 등 시공조건을 고려하여 경제적이고 안전하며 원활한 시공이 가능하도록 결정되어야 한다.

6.3 공법선정의 한계성 검토

(1) 주요공법의 비교검토후 하나 이상의 공법을 선정할 경우, 그 선정과정에서 불확실한 조건이나 또는 자료가 없어 추정하여 공법을 선정하였을 경우에는 그 내용을 정리․요약하여 검토할 수 있도록 하여야 한다.

(2) 공법선정의 한계성은 용역수행시 선정된 공법이 실제 적용이 불가능하여 불가피한 공법변경과 이에 따른 공사비 증가를 방지하기 위한 방향으로 검토되어야 한다.

6.4 구조계산

(1) 주요 공법의 비교 검토를 위한 각 공법의 대표단면 결정시에는 각 단면에 대한 구조계산을 하여 최적 단면을 선정하여야 하며 이의 판단의 근거를 설명하여야 한다.

(2) 구조계산의 내용은 체계적으로 요약, 정리하여 발주청에서 쉽게 알 수 있도록 정리하여야 하며 구조계산에 사용된 설계조건, 변수 또는 패러미터(parameter) 등을 명확히 보고서에 수록하여 그 내용을 알 수 있도록 하여야 한다.

6.5 세부수량 및 공사비 산출

(1) 과업대상시설에 대한 세부적인 물공량을 산출하고 공사비를 산정하여야 한다.

(2) 공사착공 후 물공량 산정, 설계누락 등으로 인하여 총사업비가 증가되지 않도록 수량 및 공사비를 객관적이고 합리적으로 산출하도록 최대한 노력하여야 한다.

(3) 특히 지반조사 불철저로 인한 구조물의 심도 증가 또는 구조 변경 사례발생으로 공사비 증가 및 공사지연이 되지 않도록 설계하여야 한다.

6.6 건설계획 수립

(1) 연차별 건설계획 수립

이 과업지시서에 의해 수행될 공사의 연차별 건설계획을 투자우선순위 및 투자사업비 등을 고려, 발주청과 협의하여 검토하고 이를 총사업비와 공종별로 정리하여야 한다.

(2) 시공계획 수립

① 공사시공을 위한 시공계획을 수립하되 다음의 내용이 포함되어야 하고 공정계획은 CPM(critical path method)을 사용하여 수립하고 그 내용을 보고서에 수록하여야 한다. 다만, 감독자와 협의하여 과업 성격상 CPM기법을 사용할 필요가 없다고 판단할 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 자재 및 장비사용계획

나. 공정계획

다. 공사작업장 필요성 및 확보계획

라. 기타 시공시 특히 필요한 사항

② 공사기간은 CPM으로 정확히 산정하여 차후 공사시공자가 품질확보에 지장이 없도록 하여야 한다.  제1항의 단서는 공사기간 산정방법에 준용된다.

(3) 지장물 및 지하매설물 이설계획

① 계획대상지역내의 지장물 및 지하매설물 현황을 “2.2.5 지장물 및 지하매설물 조사” 항목에 따라 파악하고 이설 또는 보강이 필요할 시에는 이에 대책을 수립하여야 한다.

② 지장물 및 지하매설물 현황파악과 대책은 육상과 해상지장물로 구분하여 정리하여야 한다.

(4) 안전관리 및 품질관리 계획

① 공사 시공중에 유의하여야 할 안전관리 사항과 품질확보를 위한 품질관리계획을 수립하여야 한다.

② 안전관리 및 품질관리계획은 공사시방서에 그 내용이 상세히 수록되어야 한다

(5) 시험시공

공사시행중 품질확보를 위해 시험시공이 필요한 경우에는 이에 관하여 검토하여야 하며, 시험시공과 관련하여 유의하거나 관측하여야 할 사항은 공사시방서에 그 내용이 포함되어져야 한다.

6.7 관련서류 등 및 기타 자료 수집․작성

(1) 공사 시행전에 공사와 관련하여 관계부서 협의사항이 필요한 경우에는 이에 대한 관계법규를 검토하여 자료를 수집․정리하여 제출하여야 한다.

(2) 사업비의 예산확보를 위해 필요한 기본자료를 감독자와 협의하여 작성하여야 한다.

(3) 기타 이 사업시행과 관련하여 필요한 서류가 있어 감독자가 지시할 때에는 관련 자료를 수집․정리하여야 한다.

6.8 설계도서의 작성

이 과업지시서의 「설계도서 작성방법」항목을 참고한다.

6.9 실시설계 분야별 세부수행 기준

6.9.1 콘크리트 설계기준강도

각 콘크리트의 구조물별 설계기준강도는 다음을 기준으로 하되 아래의 기준을 적용할 수 없는 특별한이유가 있을 때에는 감독자와 협의하여 조정할 수 있다.

구 분	구 조 물	설계기준강도
무근콘크리트	안벽, 구조물, T.T.P	180 ㎏/㎠
	호안상치, 콘크리트블럭	180 ㎏/㎠
철근콘크리트	잔교슬래브, L형블럭, 셀블럭, 케이슨	350 ㎏/㎠
포장		휨강도 45 ㎏/㎠

6.9.2 철근콘크리트 구조물

(1) 철근콘크리트 구조물의 철근배근도를 작성할 때에는 굵은 골재의 최대치수를 고려하여 시공이 용이하도록 철근을 배치하여야 하며 특히 모서리 부분이나 복잡한 부분은 철근의 피복두께가 충분히 확보될 수 있도록 특히 유의하여야 한다.

(2) 철근배근이 복잡하여 시공시 품질확보에 세심한 주의를 요구하는 경우에는 이 내용을 공사시방서에 포함하여 품질확보가 가능하도록 하여야 한다.

6.9.3 접안시설

(1) 접안시설은 토질, 수심, 파랑, 조위, 시공성 등을 고려하여 경제적이고 적합한 구조형식이 되도록 선정하여야 한다.

(2) 접안시설 건설에 대한 신공법이 있을 때에는 이를 포함하여 검토하여야 하며 항만건설 기술 향상을 위해 외국의 시공예 등을 감안하여야 한다.

(3) 설계시 고려해야 하는 일반적인 외력은 다음과 같으며 이외 구조물의 안전에 영향을 미칠 수 있는 외력이 있을 경우에는 이를 고려하여야 한다.

① 선박의 접안력

가. 대상선박의 선형에 따른 접안속도

나. 선박의 운동에너지

다. 유효접안에너지

② 선박의 견인력(직주의 경우 연직력 포함 검토)

③ 풍압력

가. 구조물에 작용하는 풍압력

나. 선박에 작용하는 풍압력

④ 조류력

가. 선박의 진행방향으로 흐르는 조류

나. 선박의 측면에서 흐르는 조류

⑤ 파력

가. 구조물에 작용하는 파력

나. 해수중의 물체에 작용하는 파력

⑥ 양압력

⑦ 토압

⑧ 잔류수압

⑨ 사하중

⑩ 적재하중(큰 집중하중 작용시에는 별도 검토)

⑪ 활하중(크레인 하중, 자동차 하중, 군집하중 등)

(4) 접안시설에는 선박이 접안할 때 선체와 구조물의 손상을 방지하기 위하여 적절한 완충설비를 선택, 배치하여야 한다.

(5) 접안시설 중 일부구간을 해수유통을 위한 잔교식 단면을 검토하여야 한다.

(6) 계류시설의 일반적인 상재하중(하역장비 등과 같이 실제 사용될 하중 제외)은 취급화물에 따라 구분하여 결정하여야 하며, 구조물의 안정검토시 야적장에 적용할 상재하중은 야적이 예상되는 품목에 따라 결정 하여야 한다.

6.9.4 호안시설

(1) 호안의 설계시에는 파랑, 수심, 조류, 기초지반의 토질, 지진 및 지진시의 동수압, 시공법, 준설․매립 등을 고려하여야 한다.

(2) 마루높이는 배후부지 이용계획, 경관성과 월파고 등을 고려하여 적정 높이로 결정하여야 한다.

(3) 호안축조와 관련하여 기존 해안선 배후지역의 배수시설을 파악하고 장래 매립지내 배수에 지장이 발생하지 않도록 배수시설을 검토하여야 한다.

(4) 호안의 구조형식 선정시  친수성, 친환경성 및 접근성, 편의성, 안전성, 경제성 등을 고려하여 선정하여야 한다.

6.9.5 부대시설

(1) 급․배수시설

① 안벽 배후지역의 침수발생여부 검토 및 안벽 전체구역의 배수량을 산정하고 만조시에도 배수가 용이하도록 전체배수계획을 작성하여야 한다.

② 급수는 부두시설을 고려하여 소방용수 및 생활용수 선박급수 등을 해당 법규에 알맞게 계획하여야 하며, 차후 추가용량 등을 고려한 관망으로 설계하여야 한다.

(2) 야적장

① 야적장은 부두 운영시 야적될 화물의 종류를 고려하여 포장방법, 두께 등을 결정하여야 한다.

② 야적장은 부두운영의 효율성을 확보할 수 있도록 충분한 면적을 확보할 수 있도록 계획하여야 한다.

(3) 전기통신 시설

① 부두내 조명은 선박접안 및 야간 승하선 및 하역작업이 가능하도록 설계하여야 한다.

② 등기구 및 전주설계에는 부식방지 대책이 강구되어야 하며 경제성 및 내구성을 고려하여 선정하여야 한다.

③ 기타 부두의 용도 및 필요에 따라 선박용 육지전원 및 육지 전화시설을 검토하여 실시설계에 반영하여야 한다.

(4) 울타리 시설

부두울타리는 주위경관을 고려하여 보안규정에 맞게 설치되어야 하며, 해풍에 대하여 내구성이 강하고 유지비가 저렴한 재료를 선택하여야 한다.

6.9.6 관련서류 및 기타자료 수집․작성

(1) 공사 시행전에 공사와 관련하여 관계부서 협의사항이 필요한 경우에는 이에 대한 관계법규를 검토하여 자료를 수집․정리하여 제출하여야 한다.

(2) 사업비의 예산확보를 위해 필요한 기본자료를 감독자와 협의하여 작성하여야 한다.

(3) 기타 이 사업시행과 관련하여 필요한 서류가 있어 감독자가 지시할 때에는 관련 자료를 수집․정리하여야 한다.

(4) 항만건설공사의 실적공사비 축적을 위하여 설계서, 설계예산서 등은 정부제정 산출기준에 의하여 작성하여야 한다.

6.9.7 종합평가 및 건의

(1) 이 과업지시서에 의한 사업시행으로 나타날 수 있는 효과를 항만운영 측면과 지역적 및 사회적인 측면에서 분석하여야 하며, 결과를 종합하여 요약하므로써 이 과업에 의한 과업수행결과를 쉽게 알 수 있도록 하여야 한다.

(2) 이 용역에 의한 사업시행시 예측되는 문제점등에 대하여 검토하여 그에 대한 대안 등을 건의하여야 하며, 과업수행결과 기 수립된 항만기본계획의 변경조치등과 같이 행정적인 조치가 필요하거나 기타 공사시행과  관련하여 특기사항 등 중요사항이 있을 때에는 그 내용을 검토하여 보고서에 수록하여야 한다.

7. 설계도서 작성방법

7.1 공통사항

(1) 용역사는 발주에 필요한 일체의 설계도서를 작성ㆍ제출하여야 하며 설계도서의 크기, 형식 등은 감독자와 협의하여 다음사항이 포함되도록 하여야 한다.

① 설계설명서	⑦ 수량계산서(토적표 포함)

② 공사시방서	⑧ 단가산출기초(중기사용료 포함)

③ 동원인원계획표	⑨ 주요자재표

④ 예정공정표	⑩ 구조계산서

⑤ 예산(설계)내역서	⑪ 설계도면

⑥ 일위대가표)

(2) 설계도서는 시공자가 쉽게 이해할 수 있도록 작성하여야 하며 공사시방서와 공사내역서, 설계도면이 상호 일치되게 작성하여야 한다.

(3) 설계도서는 원칙적으로 국토해양부의 “건설공사집행규정”에 따라서 작성하도록 한다.

(4) 구조물별로 또는 동일 구조물이라 하여도 부위별로 각각 소요 콘크리트강도와 굵은골재 허용 최대치수 등을 설계도면과 공사시방서에 명기하여야 한다.

7.2 설계도 작성

(1) 설계도면은 CAD로 작성하여 CD로 제출하여야 하고 국토해양부의 “항만구조물 도면관리 시스템”에 부합될 수 있도록 감독자와 협의하여야 한다.

(2) 구조물 부위중 특히 시공에 유의하여야 할 부위나 구조형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도 설계상세도를 작성하여야 하며 시공시 필요한 시공상세도면의 작성목록을 별도로 작성하여 시공시의 품질관리가 적정하게 이루어지도록 하여야 한다.

(3) 구조물의 일반도, 측면, 정면도 및 복잡한 부위에 대한 상세도를 그려야 한다.

(4) 단계별 시공을 고려하여 설계도면을 작성하여야 하며 절단부 및 이음부는 품질관리를 위해 상세도를 작성하여야 한다.

(5) 철근배근도, 철근수량표를 작성하여야 하며 특히 단부 등에 대한 상세배근도와 철근피복두께 확보 및 정ㆍ부 철근의 간격유지를 위한 받침 및 간격유지재의 재료 및 설치위치도, 상세도를 작성하여야 한다.

(6) 구조물 도면에 발생가능한 균열(crack)의 종류, 허용폭 등에 대하여 서술하고 균열발생시의 처리방법 등에 대하여 명시하여야 한다.

(7) 상세도로 표시할 수 없는 주의사항(시공시 유의사항 등)에 대해서는 우선적으로 도면에 명기하고 그렇지 못할 경우에는 공사시방서의 각 절(section) 내의 “특기사항”또는 공사시방서의 마지막 부분(part) “특별사항”내에 필히 작성되어져야 한다.

7.3 공사시방서 작성

(1) 공사시방서는 설계도면 등에 표현될 수 없는 내용과 보충 설명하는 사항, 시공과정에서 필요한 기술적인 사항 등이 포함될 수 있도록 작성하여야 하며 시공과정에서 분쟁 또는 클레임(claim)이 발생되지 않도록 유의하여 작성하여야 한다.

(2) 공사시방서는 항만 및 어항공사 전문시방서를 기준으로 하여 작성하되 항만 및 어항공사 표준시방서 등 기타 이 공사의 시행과 관련된 표준시방서 및 전문시방서를 참고로 작성하여야 한다.

(3) 공사시방서의 항목은 설계내역서의 공종에 따라서 작성하여 쉽게 검토ㆍ이용할 수 있도록 하여야 한다.

(4) 공사시방서의 항목별 작성기준(format)은 다음과 같다.

① “1. 일반사항”

② “2. 재료”

③ “3. 시공”

④ “4. 특기사항”

(5) 이 과업에 의하여 시공되는 공사와 관련하여 공종별로 특별히 고려하여야 할 사항은 앞의 4)항의 “④ 특기사항"에 상세하게 각각 기술하여야 하며 개별 항목에 포함시키기 어려운 경우에는 통합하여 공사시방서의 가장 뒷부분에 "특별사항"이라는 제목(Title)으로 그 내용을 상세히 작성하여야 한다.

(6) 이 과업에서 검토된 안전관리 및 품질관리 기타 설계도면 작성시 도면에 표기되어질 수 없는 내용 등 공사시공과 관련하여 필요한 내용은 공사시방서에 포함되어야 한다.

8. 성과물 제출

(1) 수급인은 과업수행과정 중에 생산된 각종 조사, 연구, 검토결과를 정리하여 설계보고서를 작성하고 별도의 요약보고서를 작성 제출하여야 한다.

(2) 실시설계 보고서에는 각종 보고서(조사보고서, 구조계산서 등 모든 보고서)에 대한 목록이 포함되도록 하여 이 과업과 관련하여 제출되는 보고서의 종류와 종류별 권수를 언제라도 알 수 있도록 하여야 한다.

(3) 각종 보고서 및 설계도서 작성 및 납품은 국토해양부 항만건설통합정보시스템(Portcis)의 원활한 운영을 위해 “항만건설사업의 용역 및 성과품 설계도서 작성지침서”및“항만건설 설계도면 작성 및 납품지침”에 의거 작성ㆍ제출하여야 한다.

(4) 수급인은 각종 설계도서를 아래와 같이 작성하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 발주청과 성과물 항목 및 수량조정 등을 협의하여 조정할 수 있다.

① 보고서 및 부록 : 30부(요약서 포함)

② 설계도서

가. 설계내역서 : 10부

나. 공사시방서 : 10부

다. 수량 및 단가산출서 : 10부

라. 구조계산서 : 10부

③ 설계도면(A3) : 10부

④ 기타

가. 지질조사 보고서 : 10부

나. 지질조사 결과시료 및 시료상자 : 1식

다. 수심측량 및 각종 측량성과표 : 1식

라. 사진첩 : 2부

마. CD(보고서 및 설계도서) : 5EA

바. 기타 이 과업수행으로 인하여 생산되는 각종 도서 등

Ⅲ.  예 정 공 정 표

Ⅲ. 예정공정표

구 분		단위	제1월	제2월	제3월	제4월	제5월	제6월	제7월	제8월	제9월	제10월	비고
1. 기초자료조사		식
2 수심측량 및 현황측량		식
3. 지반조사 및 토질시험		식
			6
4. 기본계획 재검토		식
			6
5. 수치모형실험		식
6. 실시설계		식
7. 성과품 작성		식
공 정	월 별	%	5	5	10	10	15	15	15	10	10	5
	누 계		5	10	20	30	45	60	75	85	95	100

Ⅳ.  설 계 내 역 서

Ⅴ.  일 위 대 가 표

Ⅵ. 산 출 근 거

참 고 자 료