▶하수관거정비(2단계)공사(2공구)【구운배수분구】 기본 및 실시설계 용역◀

과 업 지 시 서

2010. 02.

수원시  하수관리과

목      차

1. 일반사항	1

1.1 과업의 명칭	1

1.2 과업의 목적	1

1.3 과업의 개요	1

1.4 주요업무의 사전승인	2

1.5 과업수행 및 공정보고	2

1.6 용역감독 등	3

1.7 계약상대자의 책임	4

1.8 설계자문	5

1.9 설계의 경제성등 검토(설계VE)	5

1.10 신기술․신공법의 도입 등	5

1.11 타 계약상대자와의 업무한계	5

1.12 보안 및 비밀유지	6

1.13 하도급 사항	6

1.14 설계변경	6

1.15 용역수행자의 교체	7

1.16 용어의 해석	7

1.17 설계 등 손해배상	7

1.18 계약상대자의 시정요청	7

1.19 설계성과품의 품질관리	8

1.20 준수사항 및 설계 시 고려되어야 할 사항	8

2. 자료수집 및 조사	10

2.1 기본방침	10

2.2 기존자료 조사	10

2.3 현지답사 및 현장조사	10

2.4 측량	11

2.5 관거 현황조사 및 기존 우․오수 체계조사	11

2.6 관거 내부조사	11

2.7 지반 및 지하수위 조사	14

2.8 하수도시설물별 조사	14

2.9 지장물조사	14

2.10 하천 수위조사	14

2.11 용지조사	15

2.12 관련계획 자료조사	15

2.13 교통관리계획서 작성을 위한 조사	15

3. 기본 및 실시설계	16

3.1 기본계획의 검토	16

3.2 설계기준 검토 및 설정	16

3.3 관거평면 및 종단계획	16

3.4 구조물 및 부대시설 계획	16

3.5 관거의 접합	17

3.6 빗물받이 및 연결관	17

3.7 굴착공법의 설계	17

3.8 비굴착공법의 설계	20

3.9 지장물 이설설계	20

3.10 가시설 설계	21

3.11 공사실명제	21

3.12 기 타	21

4. 기타 실시설계 유의사항	22

4.1 사유지 통과 관거	22

4.2 분류식화 방안	22

4.3 시공 및 유지관리계획	22

4.4 기타	23

5. 효과분석	24

6. 성과품작성 및 납품	25

6.1 일반사항	25

6.2 성과품의 구성 및 내용	25

6.3 납    품	25

6. 예정공정표	27

8. 사업위치도	28

1. 일반사항

1.1 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 『하수관거정비(2단계)공사(1공구)【구운배수분구】 기본 및 실시설계 용역』이라 하며 수원시를 ‘발주기관’이라 하고 용역사를 ‘계약상대자’라 한다.

1.2 과업의 목적

본 과업은 수원시에서 추진하고 있는 하수관거 종합정비계획에 따라 시행한 「수원시 하수관거정비 타당성조사(2003. 3)」 및 「수원시 하수도정비기본계획변경(2007. 6)」를 바탕으로 기본 및 실시설계를 시행하여 노후 및 불량 하수관거를 개량함으로서 수해를 예방하고 불명수 유입 저감 등 효율적인 하수처리로 수질을 개선하는데 목적이 있음.

1.3 과업의 개요

1) 과업의 위치 : 수원시 구운 배수분구(구운동, 서둔동, 율천동, 입북동 일대)

2) 과업의 범위 : 구운 배수분구내 불량관로 및 타당성조사 및 기본계획 시 미 조사구간을 조사․분석하여 하수관거 정비 기본 및 실시설계를 시행한다.

3) 과업의 규모

▪ 현장조사

- 하수관거노선측량(종단측량) : 57.0 km

- 관거 내부조사 : 54 km

- 배수설비조사 : 1,993 가구

- 줄파기(지장물조사용) : 26개소

▪ 기본 및 실시설계

- 대상면적 : 구운 배수분구,  A = 2.91 km2

4) 과업기간

(1) 본 과업기간은 착수일로부터 360일로 한다. (공휴일 등 휴지일수 포함)

(2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 한다.

다만, 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경 할 수 있다.

① 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때.

② 발주기관의 계획변경에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때.

③ 당초 과업수행에서 예기치 못한 사항의 발생으로 변경이 불가피하게 될 때.

④ 기타 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생 되었을 때.

1.4 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

2) 관계기관과의 협의사항

3) 기타 발주기관의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

1.5 과업수행 및 공정보고

1) 과업수행방법

(1) 계약상대자는 과업내용서와 관계법령 및 제규정 등에 따라 발주기관의 지휘감독을 받아 본 과업을 성실히 이행하여야 한다.

(2) 용역수행처리절차는 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 처리함으로서 내실 있는 설계가 되도록 하여야 한다.

2) 착수신고서 제출

계약상대자는 계약문서에 정하는 바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며 착수시 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

(1) 착수신고서

- 사업책임기술자 선임계(이력서 첨부)

- 기술용역 예정공정표

(2) 분야별 참여기술자 및 장비투입 계획서

(3) 용역수행에 필요한 다음 서류

- 내국 기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

- 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

(4) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

3) 과업수행계획서 제출

과업수행계획서는 착수일로부터 10일 이내에 과업의 특성 및 현장 여건을 감안한 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할협의서 첨부)를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용을 다음과 같다.

(1) 세부공정계획서

(2) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

(3) 과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

(4) 건설기술 경력사항 확인서

(5) 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

(6) 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

4) 업무협의 및 공정보고

(1) 보고시기

다음의 경우에는 발주기관에 사전 보고하여 검토를 받아야 한다.

① 착수단계

② 월간 정기 공정보고 시

③ 각 분기별 보고 시

④ 자문회의 시

⑤ 성과품 작성 시(또는 준공 시)

⑥ 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

(2) 월간 정기 공정보고

계약상대자는 과업수행 기간 중 다음사항을 포함한 월간공정보고서를 매월 말일을 기준으로 하여 다음달 5일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

① 과업추진 내용 및 공정 현황

② 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

③ 업무관련 회의 및 발주기관 지시사항 처리결과 (승인사항 포함)

④ 과업수행상 중요 문제점 및 대책

⑤ 참여기술자 현황

⑥ 다음 달 과업수행 계획

(3) 중간보고

계약상대자는 발주기관의 요구가 있거나 다음 각각의 경우 관련자료를 제출하고 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 발주기관의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)을 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

① 주요 단계별 과업이 종료 되었을 때

② 분기 1회 이상의 중간보고시

③ 주요계획 및 방침의 설정과 변경시

(4) 작업일지 작성

계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출하여야 하며 작업일지 양식은 「건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정」에 따른다.

1.6 용역감독 등

1) 용역감독

발주기관은 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조 하여야 한다.

(1) 기술인력 동원 현황.

(2) 용역 단계별 과업추진 내용 및 공정현황

(3) 기타 확인에 필요한 사항

2) 용역점검

발주기관은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 발주기관과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

1.7 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역 준공 후라 할지라도 설계과오나 오류 등이 있어 이에 대한 발주기관의 수정, 보완 요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 문서의 기록비치

계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4) 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률이 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

1.8 설계자문

1) 계약상대자는 발주기관으로부터 설계자문의 시기, 내용 등에 대한 계획이 통보되면 설계자문이 효율적으로 시행될 수 있도록 자료를 제출하여야 한다.

① 과업수행계획서 제출시 : 과업수행의 경제성․타당성검토, 사업추진계획, CCTV조사 등 기초자료 조사계획 적정여부

② 초기단계 (공정30%) : 각종 조사결과 분석, 수리계산 결과, 측량결과, 각종 설계 기준, 최적 하수노선의 결정

③ 중기단계 (공정60%) : 기본설계안 및 공법 비교안  검토 시 세부사항 검토 적정여부, 각종 설계안의 경제성, 시공성 적정여부

④ 마무리단계(공정 90%) : 구조계산 등 각종계산의 적정여부, 관련법규 및 공사시방서 내용 부합여부, 타당성조사와 기본 및 실시설계 비교검토(증․감 사유 포함), 하수시설물 현황, 하수관거 정비대상 연장 및 사업비 현황(시설별, 관경별, 공법별)

⑤ 수급인은 효율적인 설계자문이 될 수 있도록 발주청에 자문시행 10일전까지 기술자문을 위한 자료를 제출 하여야 한다.

2) 계약상대자는 설계자문시 지적사항에 대하여 면밀히 분석․검토하여 발주기관에 조치계획을 보고하며 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다.

1.9 설계의 경제성등 검토(설계VE)

1) 계약상대자는 실시설계 단계별 추진 공정이 30～70%일 때 발주기관과 실시설계에 대한 설계의 경제성 등 검토를 실시하고자 하는 경우 이에 필요한 관련 자료 등을 제공하여야 하며, 설계개념 발표 및 VE제안서에 대한 의견개진 등 설계VE 활동에 적극 협조하여야 한다.

2) 계약상대자는 설계의 경제성 등 검토 결과 승인된 VE 제안에 대한 조치계획서를 작성하여 발주기관에게 제출하고, 설계내용에 수정․반영 및 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

1.10 신기술․신공법의 도입 등

1) 계약상대자는 건설기술관리법 제18조제1항 및 동법시행령 제34조 및 환경기술개발및지원에 관한법률 제7조의2의 규정에 의하여 본 과업 특성에 맞는 우수한 신기술․신공법에 대해 적극 검토․적용하여야 한다.

2) 계약상대자는 신기술․신공법 및 특정공법 특정제품 등을 설계에 반영하고자 할 경우에는 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 자문회의시 공개하여 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 설계에 반영하도록 한다.

1.11 타 계약상대자와의 업무한계

공동도급일 경우에는 계약상대자 상호간에 과업분할 협의서를 작성, 수행하여야 한다.

1.12 보안 및 비밀유지

1) 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야한다.

2) 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 발주기관과 협의하여 발간한다.

3) 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 져야 한다.

1.13 하도급 사항

1) 계약상대자는 발주기관으로부터 도급받은 용역에 관하여 하도급 계약을 체결하는 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주기관에 통지하고, 발주기관은 이를 관리하여야 한다.

(1) 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

(2) 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

(3) 하도급 기간 및 하도급 금액

2) 계약상대자는 하도급인을 선정할 때에는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

(1) 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자.

(2) 관계법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자.

3) 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 기성금 및 준공금을 지급 받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다.

4) 책임한계

하도급으로 시행한 당해 설계 성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

1.14 설계변경

1) 설계용역수행 중 설계변경사항이 발생하였을 경우에는 지방자치단체용역계약일반조건(행정안전부예규 제254호, 2009.8.6)에 따른다.

2) 계약상대자는 설계용역수행 중에 주요 설계과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역계약상대자의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

3) 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 설계변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

1.15 용역수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관에서 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서 발주기관으로부터 교체요구가 있는 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

3) 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

1.16 용어의 해석

1) 과업내용서상의 용어해석에 차이가  있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

2) 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여야 한다.

1.17 설계 등 손해배상

계약상대자는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역 목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 하며, 계약상대자는 보험 또는 공제에 가입하고, 당해 용역을 완료하기 전에 보험증서 또는 공제증서를 발주기관에 제출하여야 한다.

1.18 계약상대자의 시정요청

계약상대자는 용역감독자가 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

1) 용역감독자가 설계과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

2) 용역감독자가 정당한 사유 없이 건설기술자의 교체를 요구할 때

3) 용역감독자가 정당한 사유 없이 용역업무를 지연시킬 때

1.19 설계 성과품의 품질관리

설계의 실명화를 통한 설계도서의 품질관리를 위해 최종 용역보고서 및 설계도면에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당자(설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다. (건설기술관리법 제23조의2제4항, 동법시행령 제38조의17, 동법시행규칙 제14조의5)

1.20 준수사항 및 설계 시 고려되어야 할 사항

1) 준수사항

(1) 본 과업을 충실하게 수행하기 위하여 계약상대자는 본 과업내용서와 관계법령 및 제 규정에 따라 성실히 수행하여야 한다.

(2) 과업수행 중 정책변경 등으로 불가피하여 본 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있으며, 이 경우 기수행한 설계 및 조사에 대한 비용은 상호 협의 하에 결정한다.

(3) 본 과업 내용서에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관이 과업 수행상 필요로 추가 과업을 요청할 경우에는 그 내용 및 비용 등을 상호 협의하여 결정하며 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

(4) 본 과업내용서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가시는 지방자치단체 기술용역계약일반조건 제37조제2항에 따른다.

2) 설계 시 고려되어야 할 사항

(1) 설계변경 및 공사비 증액의 최소화

(2) 환경 친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용기준 제시

(3) 건설폐자재 활용방안 검토

(4) 발주기관과 시공자간의 클레임 발생이 최소화 되도록 설계도서 작성

(5) 공사시방서에 시공 상세도면의 목록 제시

(6) 하수도법 개정에 따라 수세식 변소수가 직투입이 가능한 수준으로 최소 유속에 맞추어 설계

(7) 하수관거 정비 목표(통수능, 유속, 수질, 수밀성, 냄새 등)를 명확하게 계량화할 수 있도록 설정하여 정비 후에도 계측이나 평가가 비교되도록 하고, 하수관거의 품질이 보다 향상될 수 있도록 설계 및 정비 시행

(8) 재개발 등 개발 예정지역은 개발 후 하수량 변화에 대한 주변 지역에 미치는 영향을 면밀히 검토하여 하수관거를 용량 등 검토하기 바람

(9) 비굴착공법은 내부보수만 시행하여도 기능유지가 가능한 관로에만 극히 제한적으로 적용 검토

(10) 정비가 완료된 구간은 향후 10년에는 재정비가 불필요하도록 통수능, 유속, 수밀성 등이 확보되고 품질이 향상되도록 설계

(11) 하수관거 건설비, 유지관리비 및 유지관리 용이성 등을 비교․검토하여 경제적인 설계가 되도록 할 것.

(12) 지선 하수관거가 방류수역에 직접 연결된 경우 관리의 효율성을 위하여 간선관거를 통하여 하수가 유하 할 수 있도록 설계

(13) 정비 후 통수능 부족관거가 발생하지 않도록 계획하고 유지관리관거(최소 유속 미달 관거 중 정비가 어려운 관거)는 악취 발생, 변소수 직투입 대비 등을 위하여 최소화되도록 아래와 같이 계획할 것.

(14) 유지관리 관거는 리스트 작성, 실시설계 준공시 제출하여 하수도 관리 전산시스템에 별도 DB관리되도록 할 것.

※ 상․하류 관거 병행 정비 연장, 상․하류 관거 부설년도, 정비시 소요사업비, 예상 정비 가능 년도, 기준 미달 유속 등

(15) 비굴착 공법 설계는 지방자치단체 제한경쟁계약 운영요령(행정안전부 예규 제257호, 2007.10.5)에 의거 시행하고 비굴착 공법 적용시 각 정비구간에 대하여 전체보수 공법과 부분보수 공법을 상호 경제성을 비교하여 정비공법을 선정할 것

(16) 통수능 및 유속 등이 양호한 관거로서 배수설비 및 관 연결부위 접속 불량, 관 일부 파손 등으로 굴착공법으로 정비시에도 부분보수 공법과 상호 경제성 비교를 통하여 정비공법을 선정할 것(경제성 비교자료 보고서에 수록)

(17) 관거 조사를 통하여 발견되는 내부 퇴적물이나 지장물은 조서를 작성 제출할 것.

(18) 최종 성과품은 하수도관리 전산시스템 보유 데이터 갱신에 활용될 수 있도록 하수도 GIS DB 관리부서와 긴밀히 협의하여 설계

2. 자료수집 및 조사

2.1 기본방침

1) 현장조사 및 계획수립 시 발주기관의 지역현황을 토대로 기 수립된 도시계획 및 하수도정비 기본계획 또는 변경 등을 검토하여 계획을 수립한다.

2) 모든 계획은 기존 자료를 최대한 이용하여 검토하며 합리적인 계획을 수립한다.

3) 본 과업은 대상지역에 대한 타당성조사 및 기본계획을 토대로 설계를 수행한다.

4) 조사업무 수행중 과업여건상 과업내용의 변경이 필요할 경우 상호간의 합의에 의해 변경할 수 있다.

2.2 기존자료 조사

1) 타당성조사 및 기본계획자료 일체 (관망도, 유량계산서, 관거조서, 관거조사 보고서, 조사테이프 및 사진, 개보수조서 및 평면도 등)

2) 주요 지하매설물 (전기, 통신, 가스, 지하철, 철도 등) 및 지상구조물 기초 형상

3) 정비수법, 설계기준, 정비공법의 검토

4) 타기관 및 타부서 사업계획

5) 도로대장 등 타부서 시설물관리대장

6) 타당성조사 및 기본계획 이후 변화된 관거에 대한 자료

7) 분류식 가능지역 검토 및 계획

8) 지형도

9) 기본 및 실시설계 지역 내의 하천의 유량․수위 등의 현황

10) 토지이용계획, 가로 및 도로계획

11) 재개발, 재건축 등의 추진 계획

12) 상수도 사용량(동별, 월별)

13) 공업용수 현황 및 계획, 지하수 사용현황

14) 인구에 관한자료

15) 주요공장 및 사업장의 배출량

16) 개인하수도 처리시설

17) 침수지역 현황 조사

18) 사업지구내 주변 토질조사 자료

19) 기타 본 설계와 관련된 자료

2.3 현지답사 및 현장조사

1) 계약상대자는 현지를 답사하여 현지조건에 계획시설물이 적합한 지를 확인하여야 한다.

2) 지형, 지질, 하천 등의 자연상황과 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 작업장 등의 확보 가능여부를 판단하여야 한다.

3) 현지 답사시에는 반드시 사진(또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 설계시에 참조 하도록 한다.

4) 현장조사는 타당성조사 및 기본계획 후 오랜 기간이 지난 관계로 도로상황, 시공환경 및 지하매설물 등에 변화가 있을 수 있으므로 타당성조사 및 기본계획 조사 내용과 현장을 비교 확인하여 시행한다.

5) 유역 및 주변 환경 조사

(1) 타당성조사 및 기본계획에 기입되어 있는 지형, 배수분구계(분수령), 배수 흐름방향, 추가 공사시행 여부 등을 확인하여 현지 적합 여부 검토

(2) 용도지역(주거지역, 상업지역, 공업지역, 녹지지역)이나 주야간 소음의 종류 파악

(3) 주간, 심야, 주야간, 주야연속 시공구분 등을 결정하기 위한 대강의 교통량 자료나 버스 및 택시 정류장, 버스노선 등을 조사

(4) 기타 공터나 주차장 등의 장래계획에 관하여 관련기관과 조사를 통하여 확인

(5) 도로형상, 포장종별과 시공년도, 전기, 통신, 상수도, 가스 등의 맨홀위치와 형상, 기타 도로구조물의 현황 조사

(6) 발주기관이 제공하는 도로포장 년도 및 향후 포장계획를 참고로 하여 연차별 집행계획 수립시 활용

(7) 기존 하수관거 단말부의 매설위치, 매설심도 등을 현지 확인하고 하천에 방류하는 경우에도 같은 조사 시행

6) 시공조건 조사

(1) 시공조건 조사는 현재 주변상황이나 지하매설물을 확인하여 조사

(2) 수집 자료는 도로대장, 하천계획도, 기존의 토질조사 자료, 도로구조물의 기초도 등을 수집하여 활용

(3) 관련기관의 매설물조사는 전력, 가스, 통신, 상수도 등을 조사하고 정비 및 확충계획 등도 함께 조사

(4) 수집된 자료는 현장조사를 통하여 확인하고 수집내용과 현장조사 내용을 토대로 지하매설물도 작성

7) 작업환경 조사

(1) 노선별 설계 수행에 따른 일반적인 제약조건을 파악

(2) 노상 교통상황 조사를 통하여 도로의 우회, 작업대의 노상 설치 가능여부, 공사재료의 운반 난이도, 작업 시간대 등의 자료 확보

(3) 하천으로 방류하는 우수토실의 구조 및 설치개소와 호안제방의 현황을 조사하여 제방을 통과하는 공사의 경우 하천관리자와의 사전 협의를 통한 복구방법 및 시공가능시기 파악

2.4 측량

1) 일반사항

(1) 측량은 측량법과 공공측량의 작업규정 세부기준에 의하되 수원시 수치지도(1/1,000)와 비교․평가하여 정확도를 높여 시행하여야 한다.

(2) 계약상대자는 측량을 실시하기 전에 작업계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

(3) 작업계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

① 조사물량

② 작업계획표 (외업, 내업)

③ 인원편성

④ 주요기기

⑤ 특기사항 (안전관리, 사진촬영)

⑥ 위 치 도

⑦ 기    타

(4) 측량기구는 수시로 점검하여야 하며, 공인기관의 보정․확인을 받은 것이어야 한다.

(5) 계약상대자는 측량작업시 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

(6) 측량작업시 필요한 관계기관의 제수속은 계약상대자 부담으로 신속히 처리한다.

(7) 측량을 위해 교통 혹은 보행의 금지 또는 제한이 필요한 경우 해당 경찰서 및 발주기관과 협의하여 허가를 득한 후 시행한다.

2) 종․횡단측량

(1) 타당성조사 및 하수도대장도(수치지형도)에 사용한 수준점(T.B.M)확인 및 복구를 통하여 정비공사에 활용하도록 한다.

(2) 굴착공법으로 시행하는 개․보수 관거에 대한 종․횡단측량을 시행한다.

(3) 국토지리정보원의 수준점 성과를 이용하여 그 폐합차가 허용범위 이내에 들도록 하고 주요지점에 표석(수준점)을 설치하고, 위치 및 표고를 평면 및 측량 성과품에 명시하고 추후 공사시 이용이 가능하도록 한다.

(4) 기존 관거의 측량결과(관저고 및 맨홀 지반고)는 관거 정비계획의 기초 자료  로 활용하고 기존 하수관망도에 기록한다.

(5) 본 공사에 필요한 종․횡단측량은 20m 간격으로 시행하되 지형 등이 급변하는 곳에는 보조측점을 설치하도록 한다.

(6) 중심선 측량에 의해 결정된 종단측점에 대하여 종․횡단 측량을 실시하되 왕복측량으로 허용오차 내에 들도록 실시하고 종단면도의 축척은 종 1:100, 횡 1:500으로 작도하고 횡단면도의 축척은 1:100으로 한다.

(7) 재개발, 재건축, 뉴타운 등 개발계획이 진행중이거나 장래 계획이 수립된 지역는 전체 측량에 물량에서 제외한다.

3) 기타

(1) 타당성조사 및 기본계획 시 사용한 수준기점 사용

(2) 타당성조사 및 기본계획 이후 개․보수 또는 신설 관거에 대한 수준측량 시행

(3) 굴착공법으로 시행하는 개․보수 관거에 대한 종․횡단 측량 시행

(4) 맨홀이 없더라도 지표 경사가 변화하는 지점은 반드시 지반고를 확인하여 종단도에 표시하여 최소토피 유지 여부 확인

2.5 관거 현황조사 및 기존 우․오수 체계조사

1) 부설년도, 관경, 연장, 경사, 유량, 맨홀 및 하수도시설물 위치 등은 수치지형도(NGIS) 및 공공하수도 대장을 이용하여 현장조사를 실시하며 노선, 관경, 맨홀위치 등의 조사결과를 공공하수도 대장에 정확히 기록하여 자료로 이용되도록 하며 최근 조사 자료를 충분히 활용한다.

2) 대상지역에 대한 관거정비 방안은 기존 하수관거 현황자료 및 기존 우․오수체계 조사를 통해 시공 가능한 정비계획을 수립한다.

3) 현장조사의 맨홀 개폐시 안전시설을 설치하고 안전요원을 배치하며 조사자의 안전을 위해 보호장구를 착용하며 유독가스 발생에 대비한 강제 환풍기를 사용 등 계약상대자의 책임하에 안전에 만전을 기한다.

4) 맨홀 입구부 조절콘크리트 미시공 여부, 측면크랙 및 파손여부, 인버트 미 시공여부, 바닥면 불량여부, 뚜껑 파손여부 맨홀내 하수정체 등을 조사한다.

5) 공공하수도 대장 및 현장조사를 통해 지형 및 유하방향을 검토하여 기존의 배수분구 경계와 배수체계를 비교하여 정비계획을 수립한다.

6) 과업기간중 기존 관거현황 조사결과를 이용하여 공공하수도대장 및 하수도 GIS DB를 수정․보완할 수 있도록 자료를 제공한다.

2.6 관거 내부조사

1) 기존 관거 내부조사 자료를 충분히 활용하여 조사가 중복되지 않도록 한다.

2) 관거 내부조사는 현장 판독결과에 따라 관거상태, 개․보수판정, 공법선정 등에 영향을 미치므로 전문 조사인력을 투입하여 조사를 시행한다.

3) 관거 내부조사가 필요한 관거에 대해서는 인력 또는 CCTV로 조사한 기본자료(관로의 위치, 관로의 기본사항, 관로의 이상 상태 등)를 COMPUTER DATA BASE화하고 수집된 자료는 보고서로 작성하여 관거정비 및 유지관리의 기초 자료로 활용할 수 있도록 한다.

4) CCTV 촬영시 기존관로의 위치 및 기본사항등이 확인가능토록 하고 조사 촬영된 CD는 정해진 위치를 탐색하고자 할 때 즉시 탐색이 가능하도록 수록하며, CCTV촬영은 측시가 가능토록 한다.

5) CCTV 촬영자료는 MPEG4규격의 동영상으로 제작하여 “수원시 하수도관리 전산시스템”에 즉시 탑재하여 활용 가능토록 한다.

6) 내부 실태조사 방법

- 관경 800mm 미만 : CCTV 조사

- 관경 800mm 이상 : 육안조사(필요시 CCTV 조사)

7) 관 내부조사 사항

- 내부부식 및 크랙여부, 연결관 돌출여부, 본관 및 연결관 접속부위 파손여부, 관연결부 단차여부, 토사퇴적, 타관통과, 오접 등

8)  2000년 이후 관거개량사업 구간은 기존자료를 활용 하되, 자료유무 및 자료의 사용성 검토 후 필요시 재조사

9) 관거내부 CCTV 조사는 관거 및 배수설비 연결부위는 해당부위의 연결 상태를 확인하기 위하여 360° 회전하여 촬영하여야 한다.

(하수BOX에 대하여 육안조사한 결과 불량한 BOX 단면 노후 개․보수․보강이 필요할 시에는 별도로 안전진단 실시 후 보수대상 물량을 종합정비 물량에 포함, 정비토록 계획 수립)

2.7 지반  및 지하수위 조사

지반조사에 대한 자료는 수원시 「지반정보시스템」을 활용하여 과업 수행에 필요한 지반조사 분석을 수행한다.

2.8 하수도시설물별 조사

1) 침사지 : 침사지의 규모, 침사지 설치 필요 여부, 개․보수 필요성 조사

2) 하수관거 : 통수능 부족, 역경사, 역단차, 신설여부, 내부 불량 상태, 구조적 안전 여부, 악취발생 여부, 준설 빈도 등 조사

3) 맨    홀 : 인버트 여부, 내부 불량 상태, 구조적 안전 여부, 악취 발생 여부, 강우시 맨홀 뚜껑 부상, 점검사다리 여부 등 조사

4) 빗물받이 : 측구의 경사 적정 여부, 빗물받이 침사지 적정 여부, 내부 불량 상태, 구조적 안전 여부, 도로 경사에 따른 설치 간격 적정 여부, 배수설비 연결 여부, 인도에 설치된 경우 차도측으로 설치 위치 변경 가능여부, 악취발생 여부, 횡단보도 및 보도 턱낮춤 구간 설치 여부 등 조사

5) 펌프장 : 오수 및 하수 중계 펌프장의 적정 여부, 추가 신설 여부, 설치 가능 부지와 빗물펌프장의 월류턱 지반고, 배제 능력 등 조사

6) 저류조 : 기능상태, 강우시 제어능력, 하수관거에 미치는 영향, 추가설치 가능 장소(관련부서로 통보) 등

2.9 지장물 조사

1) 계획 구역내 각종 지하매설물 및 지장시설물을 조사하여 설계에 반영한다.

2) 조사된 지장물은 현황도 및 횡단면도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

2.10 하천 수위조사

1) 인근 하천인 일월천 및 황구지천이 차집관거 및 우․오수관거에 미치는 영향을 조사 검토한다.

2) 하천의 수위영향에 따른 하수관거내 배수위를 산정하여 침수여부를 검토하고  필요시 배수위 저하 방안을 제시한다.

2.11 용지조사

1) 지장물 및 소유자 확인

본 과업에 편입되는 용지 및 지장물을 정확히 조사하고, 지목별, 지장물별(가옥, 수목 등)로 지번과 소유자를 확인하여야 한다.

2) 조사 자료의 제출

지적조사에 따라 편입되는 용지에 대한 토지등기부등본 및 토지대장, 지장물에 대한 지장물 현황조사를 용지도와 함께 발주기관에 제출하여야 한다.

3) 조치사항

보상 및 공사에 영향을 줄 수 있는 수원시의 각종 인․허가 사항을 조사하여 과업수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

2.12 관련계획 자료조사

1) 제반사업의 연관성

본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 설계의 자료로 활용한다.

2) 도시계획사항 및 토지이용계획

계획구간내의 도시계획 현황과 토지이용 계획 등 관련 사업계획을 조사․검토하여 일관성 있는 계획이 수립될 수 있는 자료를 제공한다.

3) 조치사항

계약상대자는 기존 도시계획시설 변경 또는 신규결정이 필요할 경우 도시계획시설 변경 및 결정고시를 위하여 필요한 자료를 발주기관의 지시에 따라 작성하여야 한다.

2.13 교통관리계획서 작성을 위한 조사

1) 도로공사장 교통관리계획서를 작성하기 위한 공사구간 공사중 제 교통영향 등에 대한 조사 및 정밀분석을 실시한다.

2) 도로점용공사로 인한 시민불편사항이 최소화할 수 있도록 조사한다.

3. 기본 및 실시설계

3.1 기본계획의 검토

1) 기본계획 내용을 본 설계제원으로 검토 및 반영

(1) 계획인구 : 지표 변경에 따라 계획된 인구를 재산정하여 관거용량 계산에 반영한다.

(2) 하수량원단위 : 하수도정비기본계획에서 제시된 원단위의 검토 및 반영

(3) 우수유출량, 계획 설계빈도, 강우강도공식, 유출계수 등의 적용은 최근 상위계획에 적용된 공식 및 계수를 검토․반영한다.

3.2 설계기준 검토 및 설정

1) 기존 우․오수관거 설계기준 특히 관거내에서 침전이나 퇴적을 최소화 할 수 있도록 현재의 설계최소유속을 적용할 경우의 문제점을 상세히 검토하여 그에 대한 대책을 강구한다.

2) 구역별 불명수 유입량(지하수등), 원인조사 및 허용 지하수량 등의 분석 자료를 활용하여 우수관거용량 계획에 반영하도록 하고, 근본적인 대책을 수립 제시토록 한다.

3.3 관거평면 및 종단계획

1) 관거 용량부족에 따른 증․신설계획 관거와 불량정도에 따른 교체관거에 대해서는 평면 및 종단계획을 수립하여야 한다.

2) 관거 평면계획은 기 개발지 이외에 유역내 재개발 재건축 예정지역 및 지역지정 예정지와 개발가능지 등을 종합 검토하여야 한다.

3) 관거의 종단계획은 관거내 퇴적이나 침전이 발생치 않도록 하여야 하며 기존의 지장물 설치상태를 고려하여 시공 가능한 계획을 수립하여야 한다.

4) 관거 종단계획은 지하실의 배수설비를 공공하수도에 직결할 시 역류현상을 방지하기 위한 시설기준을 설정, 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

5) 관로의 노선계획은 기존 주택이나 시설물에 영향을 미치지 않도록 계획하여야 하며, 또한 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

3.4 구조물 및 부대시설 계획

1) 구조물 및 관거 부대시설은 불명수의 침입방지, 지하수의 오염이 없는 구조 계획을 수립설계 하여야 한다.

2) 신설 및 개량관거 부설시 교통체증 및 민원 최소화를 위한 시공계획을 검토, 적합한 방안을 제시토록 하고 관련 예산을 공사비 산출에 반영하여야 한다.

3.5 관거의 접합

1) 관거의 관경이 변화하는 경우 또는 2개 이상의 관거가 합류하는 경우의 관거의 접합은 원칙적으로 수면접합 또는 관정접합을 기본으로 하되 현장여건을 감안 관저접합, 단차접합, 계단접합을 검토 후 적용한다.

2) 특히, 최대유속을 초과하는 관거를 개량하는 경우 관경변화에 대한 유무와 관계없이 단차접합 또는 계단접합을 원칙으로 하되, 사업비의 과다 및 이상 없는 관거 전체를 재 부설하여야 하므로 현장여건, 불량상태 등을 감안하여 신중하게 검토한다.

3) 단차접합은 D300mm 이상의 관거에 적용하고 지표 경사에 따라 적정 간격으로 맨홀을 설치하고 1개소 단차는 1.5m 정도를 한도로 하고 단차가 0.6m이상인 경우에는 부관을 설치한다.

4) 계단접합은 유속이 3.0m/sec 이상의 현장 타설암거에 적용하고 계단의 높이는 1단당 30cm 이내로 하되 지표의 경사와 단면에 따라 계단의 길이와 높이를 변화시킬 수 있다.

5) D300mm 미만의 관거는 지표 경사와 같은 급경사로 부설하여도 되나 완경사로 변화하는 구간에서 유입수가 집중하게 되므로 하류관경 결정에는 에너지 흡수가 가능한 여유 있는 관경으로 설계한다.

6) 2개의 관거가 합류하는 경우의 중심교각은 되도록 60°이하로 하고, 곡선을 갖고 합류하는 경우의 곡률반경은 내경의 5배 이상으로 한다.

7) 하수관 시공완료 후 지역별 특성에 맞은 수밀시험 방법(양수, 공기압, 팩커 등)을 선정하여 제시하여야 한다.

3.6 빗물받이 및 연결관

1) 도로변의 빗물받이와 연결관은 관로내 조사 및 현장 확인을 통하여 구조적으로 건전한지를 조사하고, 또한 관거설계빈도 상향조정에 적합한 빗물받이 간격과 빗물받이 연결관이 되도록 설계한다.

2) 정비 필요성이 있는 빗물받이와 연결관은 하수도시설기준에 맞추어 설계한다.

3) 상습침수지역은 노면수의 배제가 원활히 될 수 있도록 빗물받이의 간격을 축소하고 특수형 빗물받이를 설치하는 등 방안 검토한다.

3.7 굴착공법 구간의 관거설계

1) 본 용역 설계는“하수도시설기준”및 “하수도공사시공관리요령”에 준하여 설계한다.

2) 설계시 하수구조물의 형식, 규격 등을 조사하여 위치선정 등을 정확히 한다.

3) 하수도 시설의 규모, 배수방법, 시공의 난이도, 배수계통 등을 정확히 조사하여 설계에 반영한다.

4) 하수의 배제방식, 배수계통, 방류위치 등을 결정하기 위한 기존 배수 시설의 정비 상황, 이용 불가 등을 조사하여 설계에 반영한다.

5) 횡단 구조물 및 배수시설의 설계는 도로의 토공 및 구조물과 연관하여 필요한 개소에는 배수시설물을 설치하도록 설계한다.

6) 맨홀은 관거의 방향, 경사, 관경이 변화하는 개소, 낙차의 발생개소와 관거의 합류, 접합하는 개소에 설치한다.

7) 맨홀의 간격은 ‘하수도 시설기준’ 일반기준에 의한다.

8) 하수관은 하중에 대한 강도, 내구성과 부식성, 시공성, 내마모성 및 수밀성이 확보될 수 있는 경제적인 관종으로 설계하고, 특히 주택 및 공장이 밀집된 사업지에는 내구성 및 시공성을 중점고려 하여 관종을 선정한다.

9) 성토구간 등 연약지반은 기초공을 실시하여 부등침하가 발생하지 않도록 설계한다.

10) 하수관거는 수밀성을 확보할 수 있는 관종 및 접합으로 설계한다.

11) 관거의 경사는 유속이 1.0～1.8m/s를 유지하도록 (부득이한 경우 0.6～3.0m/s)하여 하수의 정체, 토사의 퇴적 및 오수의 침전물방지 등이 가능하도록 설계한다.

12) 관거의 신설, 개량, 보수 계획 수립

(1) 관거내 침전이나 퇴적을 최소화할 수 있도록 최소유속기준 등 기존의 기준을 조사해 문제점을 보완하고 악취처리 대책을 수립한다.

(2) 관거내 토사퇴적으로 인한 유수소통 감소를 고려하여 설계하수량에 여유를 두는 방안을 검토하고 외국의 사례 등을 비교 합리적인 안을 제시한다.

(3) 기존 관거 활용이 가능한 경우, 관거의 상태를 조사하여 불명수유입을 최소화하고 수세변소수의 원활한 수송이 가능하도록 노선별 적합한 보수방법을 정하고 국내에서 보수할 수 있는지 기술보유 여부와 외국 기술도입 가능성을 제시한다.

(4) 계획 노선별, 지점별로 발생하수량을 산정하며, 관거 조사자료를 토대로 개량 및 신설 관거의 경사, 관경을 결정한다.

(5) 개량 및 신설관거는 기존 배수설비, 지하수위, 지장물 유무 등을 충분히 고려하여 평면 및 종단 계획을 수립한다.

(6) 불량 하수관거의 보수․보강 방법을 결정하기 위해 하수관거의 개․보수의 판단기준을 제시하고 해당 관거에 대한 보수공법을 선정한다.

(7) 기존 관거의 계획유량과 유하능력, 부설년도에 따른 노후도, 악취발생, 침수범위를 비교 분석하여 관거 정비계획의 우선순위를 결정하고 대책을 수립한다.

13) 터파기 및 포장복구

(1) 맨홀 터파기, 지하매설물 확인 줄파기 부분에 대한 토공은 관로 터파기 토공량에서 제외한다.

(2) 굴착된 부분에 대하여는 모래 또는 양질의 토사로 되메우기를 한 후 층다짐을 하여야 한다.

(이 경우 당해 공사현장에서 굴착된 토사를 이용하여서는 안된다)

※ 다만 이면도로(뒷골목)의 경우 전폭으로 굴착할 경우에는 양질의 굴착토사를 되메우기 한다.

(3) 포장도로 굴착시에는 컷터기를 사용하여 포장층을 절단(일직선 및 직각)한 후 굴착공사를 시행 하여야 하며, 보도상의 굴착작업은 인력으로 굴착함을 원칙으로 한다.

(4) 도로굴착 및 복구공사는 도로공사표준시방서, 도로포장설계․시공지침(국토해양부) 및 도로굴착․복구업무처리규칙(수원시) 등 관련규정에 의거 시행하여야 한다.

14) 관기초 설계

(1) 하수도 시설기준의 관기초공 결정방법을 적용한다.

(2) 각 공사구간마다 관의종류, 토질의 지내력, 상재하중, 토압, 매설조건 등을 고려하여 구조계산 결과에 따라 적정 기초형식을 선정한다.

(3) 콘크리트 기초의 경우 양생 등 공사기간이 길어지는 관계로 가정 배수설비 및 연결관, 상류관거에서 흐르는 하수의 물돌리기 대책을 수립하여야 한다.

※ 물 돌리기 등으로 인한 시공의 어려움을 예상하여 기초를 변경하는 사례가 발생하지 않도록 조치

15) 맨홀설계

(1) 신설 맨홀공사

① 인버트의 높이는 우수관의 경우 하류관경의 1/2로써 최고 50㎝로 해야 하나 분류식 오수관에서는 하류관경의 1/2 또는 시간최대 오수량의 수위 중 큰 것으로 택한다.

② 인버트의 종단경사는 하류관의 경사와 동일하게 하며 상류관 저부와 인버트 저부에는 일정한 낙차를 두는데 중간맨홀에서 3㎝정도 합류맨홀에서는 3～10㎝ 정도로 한다.

③ 현장여건 및 경제성 등에 대해 여러 공법의 장․단점을 비교 검토하여 적정 설계가 되도록 하고, 맨홀 하부에 침사지는 설계하지 않는다.

(2) 비굴착 맨홀 보수공사

① 노후 ․ 파손된 부위를 정확히 조사하고 하수관 접합부 등은 보수면적에서 제외하여 보수대상면적을 산출한다.

② 하수가 인버트에만 흐르므로 맨홀 내부 보수 공사시 물돌리기 비용은 계상하지 않는다.

(3) 상습 침수지역은 강우시 하수관거내의 역류현상 및 하류 관거의 만관에 의한 맨홀뚜껑의 분리․이탈여부를 조사하여 맨홀 잠금장치, 밀폐 맨홀, 역류방지 장치 등을 설치하도록 한다.

16) 연결관 접합부 설계

(1) CCTV 조사 자료 확인 후 연결관 보수 접합개소를 산출한다.

(2) 연결관 접합부 보수를 위한 일반도, 상세도, 시공순서, 시공방법, 품질검사 방법등 도면 및 시방서를 작성한다.

(3) 빗물받이등 연결관 접합시 기성제품의 연결지관(Saddle)을 사용, 가정하수 연결관은 접속기구를 사용하여 접합하고 부득이 사용치 못할 경우 천공기를 사용 정밀하게 천공후 연결관 삽입 등 공법을 확정하여 상세도 및 수량 및 내역을 산출한다.

(4) 연결관 불량 시공을 방지하기 위해 현장여건을 고려하여 가지관 달린관 또는 Saddle을 사용하여 시공한다.

17) 폐쇄하수관 복구공사

하수관 선형변경 등으로 폐쇄되는 기존하수관거는 철거 후 원상복구토록 한다.

3.8 비굴착 공법의 설계

1) 비굴착 공법에 의한 하수관거 정비 품질관리지침서 및 연구보고서를 참고한다.

2) 타당성조사 및 기본계획 이후 도입된 다수의 하수관거 정비 신기술의 적용성을 검토한다.

3.9 지장물이설 설계

1) 이설비의 산출

시공장비, 작업공간, 고압선 등 시공장비 사용에 지장을 주는 지장물을 포함하여 지장물중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상․하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당기관과 협의하여 이설비를 산출한 후 당해 발주기관(감독관)의 승인을 받아야한다.

2) 이설계획

이설계획은 지하매설물 관리부서의 확인을 거쳐 이설 가능여부 및 공사 착공후 이설 시기등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 첨부하고, 지장물 이설공사 순서를 설계하고, 이설에 필요한 기간을 공사기간에 포함한다.

3) 보호방안의 수립

공사시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설에 대하여는 지하매설물관리자와 협의하여 적절한 보호방안을 수립, 공사중 손상이 발생하지 않도록 한다.

3.10 가시설 설계

1) 설계 구간내 각종 지하매설물의 위치를 정확히 조사하여 구조물의 위치, 가시설의 굴착공법, 지장물 이설여부 판단 및 이설방법 등을 설계 한다

2) 공사에 필요한 가시설은 기존 교통통행에 지장이 최소가 되는 공법을 제시하여야 하며, 가시설 및 공사에 따른 단계별 교통처리방안 제시와 안전을 고려한 설계가 되어야 한다.

3) 가시설은 구조물 방수작업이 가능하도록 필요한 이격거리가 확보되도록 설계하여야 한다.

4) 복공구간과 기존도로와의 접속부는 포장면 단차가 발생하지 않도록 가시설을 설계하여야 하며, 단 지장물의 위치 등으로 단차 발생시 교통통행에 지장을 주지 않도록 완화구간을 주어야 한다.

5) 흙막이공은 터파기의 규모, 지반조건, 지하수 상태, 지장물 상태, 근접건물 상태, 시공성 및 경제성 등을 고려하여 적합한 흙막이공법을 선정하여야 한다.

6) 지장물은 이전하거나, 안전하게 시공이 될 수 있도록 매달기 등 보호공을 설치토록 설계하여야 한다.

7) 공사중 가시설 계측계획을 수립, 검토․반영하여야 한다.

8) 공사중 재해대책 및 환경관련(소음, 진동, 비산먼지, 악취, 오염 등) 대책을 수립하여야 한다.

3.11 공사실명제

공사 실명제 시행에 따른 제반 비용을 설계에 반영하여야 한다.

(1) 공사 준공표지판 부착

(2) 건설공사 시공관리 대장 (디스켓 또는 CD)

3.12  기  타

1) 관거의 종류는 하수도 시설기준 참고

2) 하수관과 맨홀의 자재 선정에서 조도계수가 작고, 강도가 높고, 내구성,  내마모성, 내식성 등과 시공성이 좋은 제품에 대하여 경제성을 검토하여 선정

3) 관거의 기초공은 토질 조사 결과에 의거 구조계산 후 관거별로 선정

4) 맨홀 및 맨홀 뚜껑의 종류와 적용은 하수도 시설기준 참고

5) 인버트 및 부관의 설치는 하수도 시설기준 참고

6) 지하매설물 공사표지판(가로 15cm × 세로 10cm, 스테인레스)

7) 역싸이펀의 설치는 최대한 피하여야 하나 부득이하게 설치하는 경우 하수도 시설기준 참조

4. 기타 실시설계 유의사항

4.1 사유지 통과 관거

사유지 통과 관거는 1/500 하수관망도를 참고하여 현장조사를 실시하고 정확한 관거의 위치를 파악한 후 유로변경, 관거폐쇄 후 간이펌프장 설치 등 방안을 설계에 반영토록 하고, 방안 수립이 불가능할 때는 현황을 파악하여 유지관리 방안을 제시한다.

4.2 분류식화 방안

1) 당 사업지역내 분류식화 가능지역에 대해 다음과 같은 사항을 고려하여 설계에 반영한다.

(1) 재개발 등이 이루어진 지역에 대해 우선적으로 분류화 가능여부를 검토하여 설계에 반영토록 한다.

(2) 지형조건, 오염원 분포현황, 관거매설조건 등을 고려하여 자연유하를 원칙으로 한 노선계획을 수립한다.(제방 횡단구간 등이 최소화 되는 노선선정 및 지형조건, 하수암거 등 지장물로 인한 오접발생을 방지할 수 있는 노선계획 수립)

단, 자연유하가 불가능 할 경우 양수식 또는 압송식 중계펌프장 계획을 수립한다.

(3) 공사의 난이도 및 교통장애, 지장물 등의 사회적 여건 및 시공성을 고려한다.

(4) 기존 차집관거에 오수관을 연결하기 위한 제방횡단구간 등 관계기관 협의가 필요한 구간에 대해서는 협의를 득한후 수행한다.

(5) 기존관거(주간선 관거 포함)의 용량을 전면 재검토하여 용량부족 및 최저유속 미달관거 선정 및 대책을 수립한다.(기존 및 시공중인 관거현황, 제원을 파악하여 관거 연결에 따른 통수능 부족현상, 역경사로 인한 차집관거 연결곤란한 사항 등이 발생하지 않도록 한다)

(6) 분류식 우수관거의 초기강우 처리시설 계획을 수립하여 설계에 반영한다.

(7) 분류화에 따른 기존 우수토실 전환 및 폐쇄를 검토하여 반영한다.

(8) 분류식관거에 우수유입방지를 위한 대책을 수립하고 우수관과 오수관의 오접합이 발생하지 않도록 한다.

(9) 분류화에 따른 맨홀, 오수받이 등 부대시설은 악취 및 침전방지를 위한 시설계획이 되도록 한다.

(10) 토질조사에 따른 구조계산, 도로폭원, 도로망 등 지역여건을 감안하여 굴착방법을 선정하여 설계한다.

2) 효율적인 배수설비 추진을 위한 법적인 방안 제시와 공동주택 단지별 배수설비 계획을 수립하여 설계한다.(필요시 배수설비 조사에 대해서는 발주기관과 협의하여 조정할 수 있다.)

4.3 시공 및 유지관리계획

1) 공사예정공정표

(1) 예정공정표는 단계별 공사 계획에 따라 공사항목, 흐름도(FLOW CHART), 사전계획에 기초하여  CPM Network로 설계원도를 작성하고, A3규격으로 축소하여 제출한다.

(2) 준공일자는 최소 소요일수에 여유일수를 감안하여 산정하며, 이는‘발주기관’과 협의하여 결정한다.

2) 유지관리

(1) 하수관거는 지하에 매설되는 관계로 시공이 끝나면 주변여건 및 경제적인 문제로 인한 관거의 개․보수가 타 사업처럼 원활하게 이루어지기가 어려우므로 매설된 관거를 항상 시공당시 관거상태로 유지관리하는 것이 매우 중요하므로 아래 사항을 고려하여 유지관리계획을 수립토록 한다.

(2) 문제점

① 하수 관거내 오물 불법투기로 인한 토사퇴적

② 관거내 지장물로 인한 CCTV 카메라 촬영 및 준설작업의 어려움

③ 하수도대장의 관리부실(정확성 결여, 자료의 누락, 변동자료의 미기록)

④ 준설장비의 재래식 및 준설요원 확보 곤란

⑤ 타 지하매설물로 인한 시설 및 개량공사의 어려움

⑥ 주민에 대한 홍보 부족(오접, 폐기물 불법투기)

⑦ 공사후 레미콘 등 폐기물 불법투기

(3) 개선방안

① 관경별 준설 및 청소방법 제시

② 건설공사의 잔류물, 일상생활의 쓰레기 등을 맨홀이나 하수관거로의 불법투기를 억제하는 홍보활동 강화

③ 관거내 설치된 상수도관, 도시가스관, 통신케이블 등 장애물은 이설 또는 제거토록 한다.

④ 하수도와 관련된 각종자료의 전산화 또는 정기적인 재작성으로 자료관리 철저

⑤ 부실시공 방지를 위한 CCTV조사의 활용 및 확대

⑥ 지하매설물 종합관리체계 확립

⑦ 홍보활동 강화 및 방지대책 수립

4..4 기 타

1) 암거의 경우 정밀안전진단을 시행한 관거는 정밀안전진단 결과를 설계에 포함하고, 정밀안전진단을 실시하지 않은 관거는 조사결과를 바탕으로 관거 개 ․보수 조서를 작성한다.

2) 모든 조사 자료는 DATA BASE화하여 지속적으로 보관하여, 향후 하수관거 유지관리 및 정책수립에 기초 자료로 활용토록 조치한다.

3) 침수의 우려가 없는 지역, 노면수 전용관거, 분류식지역 우수관거 등은 정비여부를 재검토하여 정비계획을 수립한다.

4) 관거정비 공사 시행시 적용된 공법을 공사대장에 표기하여 GIS 구축시 DB화가 가능토록 조치한다.

5) 설계용역에 반영하는 각종 재료와 제품은 국산자재를 사용함을 최대한 고려하고 KS제품을 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 단 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후 관리시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재는 발주기관과 협의 후 채택한다.

6) 하수관거 정비 목표(통수능, 유속, 수질, 수밀성, 냄새등)를 명확하게 계량화할 수 있도록 설정하여 정비 전․후에도 계측이나 평가가 비교 되도록 하고, 하수관거의 품질이 충분히 유지될 수 있도록 설계하고 정비시 목표달성을 위하여 조사, 모니터링 등에 대한 계획 및 방법과 결과를 보고서에 명기 하여야 한다.

7) 뉴타운지역, 재개발 등 개발 예정지역은 개발 후 하수량 변화에 대한 주변 지역에 미치는 영향을 면밀히 검토하여 하수관거의 용량등을 검토하여야 한다.

5. 효과분석

1) 각종 관련자료 조사 및 분석을 통하여 불명수량을 산정하여 불명수 저감량 및 저감효율을 분석후 정량적인 목표를 제시한다.

2) 불명수량 산정을 위한 상수도 사용량은 누수량 등을 제외한 실제 상수도 사용량(상수도요금 부과량)을 의미하며, 동별, 월별자료를 입수하여 분석한다.

3) I/I 분석은 여러 가지 방법에 대하여 비교분석 후 본 배수분구의 실정에 맞은 분석방법을 선정하여 실시한다.

4) 「하수도공사 시공관리요령」등의 관거공사 준공 검측 방안을 수립하여 사업의 완료에 따른 검증방안을 제시한다.

5) 환경부에서 시행중인「하수관거정비 타당성조사」의 수행결과를 반영하여 보다 합리적인 정비효과 분석방안을 제시한다.

6. 성과품작성 및 납품

6.1 일반사항

1) 성과품 작성기준

계약상대자는 성과품 작성시 발주기관 검토 후 제출하여야 한다.

2) 성과품의 인쇄

모든 성과품 인쇄는 발주기관과 협의 후 실시하여야 하며 발주기관의 요구에 따라 작성하여 제출하여야 한다.

3) 도면상의 문자, 숫자

도면상의 문자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나, 한글사용을 원칙으로 하고 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

4) 각종 자료(관거 현황 조사자료, 하수도대장도, 정비자료 등)는 향후 하수도관리 전산시스템에 탑재될 수 있도록 COMPUTER DATA BASE화 하여 제출하여야 한다.

5) 타당성조사 및 기본계획 이후 하수관망도 전산화 과정에서 관로번호 체계가 변경되었으므로 관거조사 결과, 수리계산서, 설계도면 등 모든 자료는 타당성조사 및 기본계획 관망도가 아닌 하수도 GIS 관망자료를 기준으로 작성하고, 모든 도면의 기본도는 수치지형도를 사용한다.

6.2 성과품의 구성 및 내용

1) 종합보고서 작성

2) 요약보고서 작성

3) 구조 및 수리계산서 작성

4) 설계도면

5) 공사시방서

6) 설계예산서

7) 유지관리지침서

8) 용지도․지장물조서 및 인허가 서류

9) 기  타

6.3 납품

- 설계자문 제출자료

∙ 기본 및 실시설계 보고서 : 20부

∙ 기본 및 실시설계 보고서 부록 : 20부

∙ 기본 및 실시설계 도면 : 20부

- 최종성과품의 종류 및 납품부수

성 과 품 종 류		수 량		비 고
		책자 및 도면	CD-ROM
기 본 및 실 시 설 계 보 고 서		10부	3부
구 조 및 수 리 계 산 서		10부	3부
지 반 조 사 보 고 서		10부	3부
유 지 관 리 지 침 서		10부	3부
공 사 시 방 서		10부	3부
설 계 예 산 서		10부
수 량 산 출 서		10부
단 가 산 출 서		10부
설 계 도 면	설 계 원 도	1식	3조 (CAD FILE)
	축소판 원도	1식
	축 소 도 면	10부
용 지 도	원 도	1식
	용 지 조 서	10부
지 장 물 조 서		10부
측 량 원 도 및 야 장		1식
기타 발주기관이 요구하는 자료		1식

※ 발주기관의 분리발주 필요시 성과품내용은 조정할 수 있음

7. 예정공정표

구 분	용 역 기 간 (12개월)
	1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월
1) 기 시행한 하수관거정비 등 자료수집 및 분석
2) 관거 내부조사 (CCTV 및 육안조사)
3) 기본설계 (공사범위 및 노선선정 검토)
4) 조사측량 및 배수설비조사
5) 실시설계
6) 설계자문(심의)
7) 성과품 작성 및 인쇄

8. 사업위치도