평택․당진항 관리부두(평택측)

기본 및 실시설계용역 과업지시서

목     차

1. 과업의 개요	9

1.1 과업의 목적	9

1.2 과업의 위치	9

1.3 과업의 범위	9

1.3.1 기초자료조사	9

1.3.2 수치모형실험	10

1.3.3 기본계획 재검토	10

1.3.4 기본 및 실시설계	11

1.3.5 사전재해영향성검토	11

1.3.6 문화재지표조사	11

1.3.7 설계도서 작성 및 제출	11

1.4 과업기간	11

1.5 과업시행방법	12

1.6 설계변경조건	12

2. 일반사항	12

2.1 과업수행의 기준	12

2.2 각종 기술기준의 적용	12

2.3 공사비산정 적용기준	13

2.4 제출물	13

2.5 참여기술자	14

2.6 과업지시서의 해석	14

2.7 과업추진에 대한 일반사항	14

2.8 과업수행결과에 대한 책임	15

2.9 국제입찰에 대비한 설계도서 작성	15

2.10 하도급 시행	15

2.11 위반행위에 대한 조치	16

2.12 보고사항	17

2.13 설계자문	17

2.14 과업완료 후의 보완요청 등	17

2.15 성과품의 소유	17

2.16 보안대책	18

2.17 관계기관 및 법규 협의	18

2.18 기타사항	18

3. 기초자료 조사	19

3.1 자연조건 조사	19

3.1.1 공통사항	19

3.1.2 기상자료	19

3.1.3 해상자료	20

3.1.4 지형조사	20

3.2 현지조사	20

3.2.1 공통사항	20

3.2.2 지형측량	21

3.2.3 수심측량 및 지층탐사	21

3.2.4 지반조사 및 시험	22

3.3 입지여건조사	24

3.3.1 인문․사회현황	24

3.3.2 산업 및 경제현황	24

3.3.3 배후도로망 현황	24

3.3.4 동력 및 용수현황	24

3.4 관련계획 검토	25

3.5 지장물 및 지하매설물 조사	25

3.6 공사용 작업장 조사	25

3.7 재료원 조사	26

4. 수치모형실험	26

4.1. 파랑변형실험	27

4.2 해수유동실험	27

4.3 퇴적물이동실험	28

4.4 오염물질확산실험	29

4.5 해수교환율실험	29

5. 항만현황 조사	29

5.1 일반사항	29

5.2 항만의 개요	29

5.3 항만의 특성	30

5.4 항만시설현황	30

5.5 항만이용현황	30

5.6 관공선 등 현황 및 기타사항	31

6. 기본계획 재검토	31

6.1 일반사항	31

6.2 주요 검토내용	32

6.3 매립재 활용계획 검토	32

6.4 수로구역 적정 수심계획 검토	32

7. 기본 및 실시설계	33

7.1 공통사항	33

7.2 공법 및 단면검토	34

7.3 공법선정의 한계성 검토	35

7.4 구조계산	35

7.5 세부수량 및 공사비 산출	35

7.6 건설계획 수립	36

7.7 관련 서류 및 기타자료 수집․작성	37

7.8 설계도서의 작성	37

7.9 실적공사비 작성	37

8. 분야별 세부수행 기준	37

8.1 콘크리트 설계기준강도	37

8.2 철근콘크리트 구조물	38

8.3 접안시설	38

8.4 호안시설	39

8.5 준설 및 매립	39

8.6 도로 및 포장	42

8.6.1 일반사항	42

8.6.2 토공설계	42

8.6.3 횡단구조물 및 배수시설물의 설계	42

8.6.4 포장설계	43

8.7 부대시설	43

8.7.1 급․배수시설	43

8.7.2 관련시설부지	43

8.7.3 전기설비	44

8.7.4 울타리 및 출입문시설	44

8.7.5 기타	44

9. 종합 및 건의	44

10. 문화재지표조사	45

10.1 사전조사	45

10.2 위치측정 및 조사선운행	45

10.3 수중지형조사	45

10.4 수심측량 및 지층탐사	45

10.5 해저면 영상 조사	46

10.6 지자기조사	46

10.7 잠수조사	46

10.8 보고서 작성	46

11. 사전재해영향성검토	47

11.1 공통항목	47

11.2 입지 및 협의대상 유형별 검토	47

12. 설계도서 작성방법	48

12.1 공통사항	48

12.2 설계도 작성	49

12.3 공사시방서 작성	49

13. 성과물 제출	50

1. 과업의 개요

1.1 과업의 목적

평택·당진항 개발에 따른 관리부두의 시설 부족으로 입항선박의 대기시간 증가 및 비상 출동시 신속한 대처능력이 저하되어 항내 권역별 원활한 역무서비스 제공을 위한 관리부두(평택측) 설계로서 기 시행된 기본계획과 관련계획을 충분히 조사검토하여 합리적이고 경제적인 시설물 축조공사에 필요한 제반 설계도서를 작성하는데 그 목적이 있음.

1.2 과업의 위치

경기도 평택시 평택·당진항 내항 전면해상

1.3 과업의 범위

1.3.1 기초자료조사

(1) 자연조건 조사

◦ 기상 및 해상자료

(2) 현지 조사

◦ 지형측량 : 기존 측량성과 이용

◦ 수심 및 지층탐사 : 243,600m2 (9.74km)

◦ 지반조사 및 시험

- 지반조사 : 14공(해상)

- 토질실내시험 : 1식

(3) 입지여건 조사

◦ 항만현황조사

◦ 인문·사회현황

◦ 산업·경제현황

◦ 배후 수송망현황

◦ 동력 및 용수현황

(4) 관련계획 검토

(5) 지장물 및 지하매설물 조사

(6) 공사용 작업장 및 재료원 조사

1.3.2 수치모형실험

◦파랑변형실험

◦해수유동실험

◦퇴적물이동실험

◦해수교환율실험

◦오염물질확산실험

1.3.3 기본계획 재검토

◦ “전국무역항 항만기본계획 수정계획” 등 관련보고서 내용을 검토하고, 항만시설 소요규모의 적정여부 분석 및 항만여건변화를 충분히 반영한 기본계획 재검토

1.3.4 기본 및 실시설계

(1) 관리부두 : 부잔교 3기

(2) 호안시설 : 860m

◦ 부잔교측 호안 : 300m

◦ 북측 가호안 : 300m

◦ 서측 가호안 : 130m

◦ 동측 가호안 : 130m

(3) 준설 및 매립 : 1식

(4) 연약지반 개량 : 1식

(5) 진입도로 : 1식

(6) 포장 및 급․배수, 오수 : 1식

(7) 전기․통신 및 부대시설 : 1식

1.3.5 사전재해영향성검토

1.3.6 문화재지표조사

1.3.7 설계도서 작성  및 제출

1.4 과업기간

착수일로부터 10개월로 한다.

1.5 과업시행방법

본 과업지시서에 의거 도급으로 시행한다.

1.6 설계변경조건

본 과업 수행 중 아래와 같은 사항 발생시 계약금액 범위내에서 설계변경을 할 수 있다.

(1) 과업범위 및 내용의 증감이 있는 경우 (단, 과업내용 미이행시 정산처리함)

(2) 천재지변 및 기타 불가항력적인 사유로 변경이 불가피할 때

(3) 기타 발주청이 필요하다고 인정할 때

2. 일반사항

2.1 과업수행의 기준

(1) 용역과업수행은 이 “과업지시서”와 이 과업지시서상의 “2.4 (2)호의 과업수행계획서”에 의하여 시행하여야 한다.

(2)  수급인은 우선적으로 최신의 전문기술 지식을 활용하여야 하며, 용역성과가 발주청에 최대이익을 줄 수 있도록 과업을 수행하여야 한다.

(3)  수급인은 공사비가 설계누락 또는 과다계상이 되지 않도록 하여야 한다.

(4)  수급인은 기 시행된 기본계획 용역의 내용을 충분히 검토, 적용하도록 하여야 하며 특별한 사유 없이 변경하여서는 안된다.

(5) 설계기준은 각종 자료를 광범위하게 수집·분석하고 용역수행 단계별로 필요한 기준을 일목요연하게 정리하여 감독자와 협의하고 발주청의 승인을 받아야 한다.

2.2 각종 기술기준의 적용

(1)  정부의 제반규정과 표준시방서, 설계기준 등 객관적이고 공신력 있는 국내의 기준을 적용하여 시행하여야 하며, 외국의 기준 등을 이용하였을 때에는 발주청이 그 내용을 알 수 있도록 그 인용부분 및 자료출처, 적용배경을 명확히 하여야 한다.

(2)  과업수행 중 사용되는 모든 자료는 그 출처를 밝혀 객관성이 확보되도록 하여야 한다.

2.3 공사비산정 적용기준

(1)  노임단가 : 용역준공시의 대한건설협회 및 엔지니어링진흥협회, 대한측량협회에서 조사 공표한 노임(이월시는 성과품 납품 당해 연도분 적용)

(2)  환율 : 용역준공기준 해당 연도초의 전신환매도율 적용(이월시는 성과품 납품 당해 연도분 반영)

(3)  중기사용료 : 용역준공 기준 해당 연도의 조달청 중기사용료

(4)  자재단가 : 용역준공 기준년도 최근 조달청 가격정보지 또는 물가정보지 단가 적용

(5)  수량 및 단가산출 : 정부제정 건설공사 표준품셈 및 국토해양부의 적산기준 등 관련지침에 의하여 산출(이에 의할 수 없는 경우는 적정단가를 발주청과 협의하여 산출)

2.4 제출물

(1) 착수계 및 책임기술자 선임계

수급인은 과업에 참여할 사업책임기술자 및 분야별 책임기술자를 담당과업수행 분야별로 구분 작성하여 용역착수 후 7일 이내에 자격증사본을 첨부하여 발주청에 제출하여야 한다.

(2)  과업수행계획서

◦ 수급인은 「건설기술관리법 시행규칙」 제13조와 관련한 “별표5”의 “설계 등 용역업자의 사업수행능력 평가기준”의 “1.평가기준”을 참고로 수행계획, 수행방법 등에 관하여 과업수행계획서를 작성, 착수 후 14일 이내에 발주청에 제출하여야 한다.

◦ 과업수행계획서는 과업 단계별로 구분하여 작성하고 단계별 주요 검토사항 및 인원투입계획, 세부공정계획 등이 포함되어야 한다.

(3)  세부조사시행계획서

◦ 수급인은 이 과업지시서상의 “3.2 현지조사” 항목의 “3.2.1 공통사항”에서 규정한 세부조사시행계획서를 발주청에 제출하여야 한다. 다만, 세부조사계획서는 당해 조사가 착수되기 전까지 제출하도록 한다.

◦ 세부조사시행계획서는 발주청과 협의하여 작성하여야 한다.

2.5 참여기술자

(1)  사업책임기술자는 과업지시서에 명시된 업무와 계약조건을 충실히 이행하여야 하며, 모든 중요한 사항에 대하여 발주청과 협의하여야 한다.

(2)  용역에 종사하는 기술자는 과업수행계획서와 일치되게 투입되어야 한다. 단, 추가투입이나 사망, 질병, 기타사유로 교체가 불가피할 경우는 교체자의 자격 및 경력에 대하여 발주청의 사전승인을 받아야 한다.

(3)  참여기술자가 과업수행에 부적당하다고 판단되거나 태만하다고 인정될 때에는 해당자의 교체를 요구할 수 있고 수급인은 이에 응해야 하며, 이로 인한 용역과업의 지연이나 용역기간의 연장은 인정되지 않는다.

2.6 과업지시서의 해석

과업지시서상의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 발주청과 수급인이 의견을 달리하는 경우는 신뢰를 가지고 최대한 서로 협의하여 결정하되 협의가 되지 않을 경우는 발주청의 해석에 따르는 것으로 한다.

2.7 과업추진에 대한 일반사항

(1)  발주청이 수급인의 귀책사유로 과업수행이 지연된다고 판단하여 지시할 경우는 지시에 따라 지체 없이 과업이 예정대로 추진되도록 인력, 장비 등을 추가하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

(2)  본 과업지시서에 누락되었더라도 과업목적을 달성하기 위하여 당연히 필요한 사항은 발주청과 협의하여 수급인의 부담으로 시행하여야 한다.

2.8 과업수행결과에 대한 책임

(1)  발주청의 협의를 거친 사항이라도 설계상의 잘못이 발견될 시에는 추가비용의 청구 없이 수급인의 책임하에 수정․보완하여야 한다.

(2)  용역 수행결과의 잘못으로 인하여 중대한 재난이 발생하거나 설계 잘못으로 인하여 발생되는 분쟁은 수급인이 책임으로 한다.

2.9 국제입찰에 대비한 설계도서 작성

공사의 계약이 국제입찰 대상일 경우에는 국제입찰에 대비하여 설계도서를 작성하여야 한다.

2.10 하도급 시행

(1)  수급인이 하도급을 시행하고자 하는 경우에는 발주청에 통보하여야 하며 하도급계약내용(제4항 참조)을 계약체결일로부터 30일 이내에 발주청에 제출하여야 한다. 또한, 하도급계약내용을 변경하고자 하는 경우에도 이와 같다.

(2)  과업을 수행함에 있어 필요한 경우 타 전문기관을 활용할 수 있으며, 이 경우 사전에 발주청과 협의하여야 한다.

(3)  발주청의 승인을 받지 않아도 되는 하도급의 범위는 다음과 같으며 이 경우에도 하도급계약내용(제4항 참조)을 계약체결일로부터 30일 이내에 발주청에 제출하여야 한다.

◦ 지반조사 및 시험

◦ 각종 측량․조사

◦ 제도 및 도면작성 등

◦ 수량내역서 작성 및 견적업무

(4)  하도급의 승인요청을 하는 경우 또는 하도급계약내용 변경을 위하여 승인요청을 하는 경우에는 다음 사항을 명백히 하여야 한다.

◦ 계약건명 및 계약금액

◦ 하도급 부분 및 내역

◦ 하수급인

◦ 계약이행기간

◦ 하도급사유(하수급인 및 기타 하도급조건 변경시에는 변경하는 사유)

◦ 계약서 사본(계약체결 후 제출)

◦ 기타 참고사항

(5)  수급인은 하수급인으로 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자로 선정하여야 하며 법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자만이 용역을 할 수 있는 경우에는 해당면허 또는 허가 등의 자격요건을 구비한 자로 선정하여야 한다.

(6)  수급인은 하도급부분에 대하여 기성고 지출이 되었을 경우에는 지체없이 하수급인에게 대금을 지급하여야 한다.

(7)  하도급에 의해 수행된 용역성과에 대해서도 발주청에 대한 책임은 수급인이 져야 한다.

2.11 위반행위에 대한 조치

(1)  다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 계약위반 행위로 간주하여 계약 해지 또는 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

◦ 제반지시사항을 특별한 이유 없이 기한내에 이행치 않을 때

◦ 계약기간내에 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

◦ 과업수행상 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

◦ 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급 주었을 때

(2)  발주청이 계약위반 행위로 간주하여 계약해지 등의 조치를 취하고자 할 때에는 조치 전에 2회 이상 수급인에게 과업의 성실한 수행을 요구하여야 한다.

2.12 보고사항

(1)  공정보고

착수 개시일로부터 매월 말일 기준 정기 공정보고를 하여야 하며 보고양식은 발주청과 협의하여 정하도록 한다.

(2)  중간보고 및 최종보고

◦  1회 이상의 중간보고와 최종보고회를 실시하여야 하며, 보고 횟수 및 시기는 발주청과 협의하여 결정한다.

◦ 보고회 외에 발주청이 특별히 필요하다고 판단하여 보고회를 개최토록 지시하는 경우 수급인은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

◦  수급인은 과업완료 최소 1개월 이전에 최종보고서(안)를 제출하여야 하며, 발주청에서 수정 또는 보완을 요구하는 경우 그 내용을 검토하여 수정․보완하여야 한다.

2.13 설계자문

(1) 수급인은 당해용역 수행중 설계자문을 1회 이상 받아야 하고, 자문위원회에 참석하여 설계내용을 설명하여야 하며, 자문결과는 관련내용을 검토, 조치계획을 수립하여 발주청에 제출하고 승인을 받아야 한다. 이 경우 자문내용에 이의가 있을 경우에는 수급인은 그 사유와 근거를 제시하여야 한다.

(2)  발주청의 승인을 얻어야 할 조치계획은 그 내용을 설계에 반영하고 감독자의 확인을 받아야 한다.

(3) 자문위원의 선임 및 자문단 운영에 관한 사항은 발주청과 협의하여 결정한다.

2.14 과업완료 후의 보완요청 등

수급인은 과업완료 후라도 용역성과에 대한 누락, 오류, 불분명 등 미비사항이 발견되어 발주청으로 부터 재검토 또는 보완요구가 있을 경우에는 별도의 비용 청구 없이 재검토 또는 보완하여 제출하여야 한다.

2.15 성과품의 소유

수급인은 용역수행으로 인하여 발생한 각종 개발 및 조사 자료와 도면, 시방서, 견적서, 입찰서류 및 원도 등 일체의 성과품을 발주청의 소유로 하고 발주청의 승인 없이는 제3자에게 제공하거나 이 용역외의 목적에 사용할 수 없으며 준공시 발주청에 용역과 관련된 일체의 성과품을 정리·제출하여야 한다.

2.16 보안대책

(1) 본 과업을 위하여 수집된 자료 및 과업수행의 결과에 대하여 철저한 관리, 보안을 유지하여야 하며 특별히 보안유지를 위하여 중요하다고 인정되는 서류와 자료 및 결과는 이의 누설, 분실, 도난을 방지하기 위하여 보안관리책임자를 지명하여 관리토록 하여야 한다.

(2) 용역 참여인원에 대한 서약서를 발주청에 제출하고 보안교육 등 보안조치를 강구토록 하며, 용역 참여인원의 변경시 과업내용의 사전유출 방지와 인수인계를 철저히 하여야 한다.

2.17 관계기관 및 법규협의

(1) 수급인은 본 용역수행 과정에서 타 기관과의 협의 및 타 기관으로부터 허가를 받아야할 사항에 대하여는 발주청을 보좌하고 관련 법규에 저촉되지 않도록 유의하여야 한다.

2.18 기타사항

(1)  용역보고서 외에 도시계획반영 등과 같이 차후 이 용역과업에 의한 공사 추진시 필요로 하는 자료가 있을 경우에는 별도로 작성·제출하여야 한다.

(2)  본 용역수행에 있어 제3자의 권리대상으로 되어있는 특허권 등을 사용할 때에는 수급인은 그 권리의 사용에 관하여 일체의 책임을 져야 한다.

(3)  설계도서의 작성은 “항만건설통합정보시스템(Port CIS)”의 원활한 운영을 위하여 “항만건설사업의 용역 및 성과품 설계도서 작성지침서”에 의거하여 작성하여야 한다.

(4)  과업지시서에 의한 모든 성과품은 원고가 작성되면 발주청의 승인을 득한 후 조판에 임하고 성과품의 편집, 인쇄방법 등은 별도로 사전에 협의하여야 하며, 검토서, 계산서, 각 도면에는 책임기술자, 검토자, 작성자의 서명이 있어야 한다.

(5)  현지조사 및 사후 증빙자료로 이용될 내용 등 용역관련 주요사항은 사진 촬영하여 사진첩 2부를 작성, 원판(필름) 또는 CD와 함께 용역 완료시 제출하여야 한다.

(6)  수급인이 공동으로 용역과업을 수행할 때에는 과업의 효율적수행과 작업능률 향상을 위해 발주청의 요구가 있을 때에는 합동사무실을 설치하여야 하며 설치위치 등에 대하여는 발주청과 협의한다.

3. 기초자료 조사

3.1 자연조건 조사

3.1.1 공통사항

(1) 실시설계에 필요한 자연조건을 조사하되 기 수행한 내용 또는 계획대상사업에 대하여 관련된 적정자료가 있을 때에는 이를 이용한다.

(2) 자연조건조사는 이 절의 아래 항목의 내용에 따라 정리되어져야 한다.

3.1.2 기상자료

(1) 가능한 한 과거 20년간의 기상자료를 수집, 이를 다음 사항별로 정리․분석하여 본 과업에 이용하여야 한다.

◦ 풍향별(16방위)로 풍급별 발생빈도를 연간, 월별, 계절별로 분석․정리하고 주풍향, 설계풍향의 풍속 등을 조사하여야 한다.

◦ 과거 발생했던 태풍에 대하여 발생지역, 평균 최대풍속, 지속시간 및 당시의 기압 등을 조사하여야 한다.

◦ 연간, 월별 강우량 및 시간강우 강도를 분석·정리하여야 한다.

◦ 연간, 월별, 계절별 안개발생일수 및 농도 등을 조사․정리하여야 한다.

◦ 연간, 월별 최고, 최저 및 평균기온을 조사·정리하여야 한다.

(2) 수급인은 조사․정리된 기상자료와 해상자료 등을 토대로 육상과 해상작업일수를 추정하여 공사기간을 산정하여야 한다.

3.1.3 해상자료

(1) 계획대상 지역의 조위, 조류, 파랑 등을 조사․분석하여야 하며, 필요시 또는 필요하다고 발주청이 지시할 경우에는 직접 관측을 실시하여야 한다.

(2) 조사된 바람자료 및 기존의 관측된 파랑자료를 이용하고 설계파고 및 파향을 추정하여야하며, 그 추정방법은 발주청과 협의하여야 한다. 또한, 계획대상 지역의 파고, 파향, 주기 및 발생빈도를 결정하고 굴절도, 회절도 등을 작성하여 굴절 및 회절에 의한 파의 변화를 검토하여야 한다.

(3) 계획대상 수역 및 인근 수역의 기존 조류자료를 수집·분석하여 대상수역의 대표적인 조류방향과 유속을 결정하고, 시설물 배치계획 및 구조물 설계에 적용하여야 한다.

(4) 기존의 인근 검조소에서 관측된 조석자료를 수집·분석하여 조위를 검토한다.

3.1.4 지형조사

(1) 계획대상지의 인근지역에 대한 지형을 조사하고, 지정학적인 위치와 특성 등을 파악․정리하여야 한다.

(2) 계획대상지의 항만에서의 위치와 주변시설물의 위치를 조사·정리하여야 하며, 시설물배치 및 구조물 설계 시 이를 이용하여야 한다.

3.2 현지조사

3.2.1 공통사항

(1) 이 과업지시서의 "1.3 과업의 범위“에 포함되어 있거나, 과업의 목적 달성을 위해서 세부적인 조사가 필요하다고 판단되거나 또는 발주청이 필요하다고 판단하여 지시할 때에는 실시설계를 위한 조사를 이 과업지시서의 다음의 내용에 따라 시행하고 이를 보고서에 정리하여야 한다.

(2) 기본계획 수립시 조사된 내용 및 인접지역에서 기 시행된 용역내용을 검토하여 분석·정리하고, 기본 및 실시설계에 이를 최대한 활용하여야 하며, 조사위치와 범위, 방법, 사용 장비, 조사반 구성 등 조사에 필요한 구체적인 내용을 포함한 세부조사시행계획서를 발주청에 제출하여 승인을 얻은 후 시행하여야 한다.

(3) 세부조사시행계획서를 제출시 각종 측량구역의 범위 및 지반조사위치 등은 승인을 득하여야 하며 기타 과업 수행상 필요한 조사가 있어 발주청이 지시하는 경우에도 세부조사시행계획서를 제출하여야 한다.

(4) 현지조사는 관련 표준시방서와 항만 및 어항공사 전문시방서에 따라야 하며 세부조사시행계획서 수립시 그 내용을 반영하여야 한다.

3.2.2 지형측량

(1) 지형측량은 기 시행한 사업계획 지역 개발계획 및 공사준공시 수행한 성과를 검토하여 이를 최대한 이용하여 경제적이고 효율적으로 실시하여야 하며 추가조사 필요시 수급인 부담으로 상세조사를 시행하여야 한다.

(2) 해안선 부근의 배수로 등 각종 지장물과 기존 호안, 제방 등에 대하여는 그 위치와 크기, 표고 등을 확인하고 도면에 표시하여야 한다.

3.2.3 수심측량 및 지층탐사

(1) 수심측량 및 지층탐사는 기본계획 용역시 수행된 내용을 검토하여 이를 최대한 이용하여 경제적이고 효율적으로 실시하여야 하며, 검토내용을 보고서에 수록하여야 한다. 또한 계획대상지역이나 그 인근지역에 대한 측량성과가 있을 경우에는 이를 비교·활용하여야 한다.

(2) 수심측량은 DGPS와 천해용 정밀음향측심의 사용을 원칙으로 하고 장애물이나 측량선의 진입이 곤란한 곳에서는 감독자와 협의하여 육상수준측량 또는 Lead측량 또는 간이음향측심기 등으로 실시할 수 있다.

(3) 수심측량 또는 지층탐사의 측심간격은 25m를 원칙으로 하되 수심측량 및 지층탐사의 목적과 구조물의 중요도, 해저의 기복 및 종류 등에 따라 발주청과 협의하여 결정하여야 한다. 대상구조물의 위치 및 중요성에 따라 축척과 측심간격을 변경할 수 있다.

(4) 보조삼각점의 위치평면은 직각좌표로 도면 또는 보고서에 명시하여야 하며, 향후 공사용 기준점으로 이용할 수 있도록 조석관측 자료와 연계하여 가T.B.M.을 설정한 후 위치평면도에 표시하여야 한다.

(5) 과업대상지역의 기반암층 등을 파악하기 위하여 기 수행된 지층탐사를 분석․정리하고 그 성과를 보고서에 명시하여야 한다.

(6) 수심측량은 해면이 정온할 때 실시하여야 하며, 측량 기록치는 기본수준면(약 최저간조면)하의 수심으로 최종수심도를 작성한다.

(7) 수심측량 및 지층탐사는 발주청에 제출한 세부조사시행계획서에 따라야 하며 과업의 증감이 있을 때에는 예산의 범위내에서 정산할 수 있다.

3.2.4 지반조사 및 시험

(1)  지반조사 및 시험은 기본계획 및 인접지역에서 기시행된 용역시 수행한 내용을 검토하여 이를 최대한 이용하여 경제적이고 효율적으로 실시하여야 하며, 검토내용을 보고서에 수록하여야 한다. 또한 계획대상지역이나 그 인근지역에 대한 지반조사 자료가 있을 경우에는 이를 비교·활용하여야 한다.

(2)  지반조사 및 토질시험에 대한 세부조사시행계획서를 작성, 발주청에 제출하여야 하며, 세부조사시행계획서에는 기술인력, 사용장비, 조사기간, 조사방법, 시험방법 등에 대한 구체적인 계획이 포함되어야 한다.

(3)  시추조사의 위치변경이나 시추개소의 증감이 필요한 경우에는 발주청과 사전협의 후 승인을 받아 시행하여야 한다.

(4)  해상시추 조사용 장비는 파랑, 조류, 조위, 바람의 영향을 받지 않는 Floating Barge 또는 S.E.P Barge를 이용하여야 한다.

(5) 지반조사는 토질전문기술자의 입회하에 실시하고 수시로 조사결과를 발주청에 보고하여야 한다.

(6)  조사위치는 평면직각 좌표로 시추조사 성과도에 표시하여야 한다.

(7)  지층변화에 따른 시추심도의 변경 및 암반층의 시추심도는 구조물 기초설계에 필요한 심도 등을 고려하여 결정되어야 하므로 세부조사시행계획서에 이에 관한 내용이 포함되어야 하며 시추중에 예측치 못했던 지층이 있는 경우에는 발주청과 협의한 후 작업을 실시하여야 한다.

(8)  자연시료 채취는 필요시 채취 가능한 위치에 대하여 KSF 2317 규정에 의하고, 샘플은 지반상태에 가장 알맞은 것을 사용하여야 한다.

(9)  표준관입시험은 1.5m마다 1회씩 실시하는 것을 원칙으로 하되, 토성이 변할 때마다 시료를 채취, 필요한 토질시험을 실시하여야 하며, 토질 특성상 표준관입시험이 불필요하거나 시험횟수의 조정이 필요하다고 인정될 경우에는 발주청과 협의하여 시행한다.

(10) 채취된 시료에 대하여는 다음의 시험을 실시하되, 공사재료원 파악 등 추가적인 시험이 필요할 경우에는 발주청과 협의하여 시행한다.

◦ 함수비시험      ◦ 비중시험

◦ 입도시험        ◦ 액성한계시험

◦ 소성한계시험    ◦ 일축압축시험

◦ 삼축압축시험    ◦ 압밀시험 등

(11)  특히 점성토층이 있을 경우 흐트러지지 않은 시료를 채취하여 흙의 전단강도시험과 압밀시험 등을 실시, 흙의 공학적 특성을 파악하여 구조물 기초설계에 차질이 없도록 하여야 한다.

(12)  지반조사의 결과는 토질주상도, 토질단면추정도, 지지층 심도분포도, 연약층 분포도, 토질시험 결과표, 토질분류도 및 구간별 연약지반 토질정수 분석자료 등으로 정리하여 지반조사보고서를 작성하여야 한다.

(13)  과업수행의 목적달성을 위해서 추가적으로 시추조사를 실시하여야 하나, 발주청의 예산 등의 이유로 추가 조사를 실시하지 못할 경우에는 이 내용을 보고서에 수록하여 시공시에 이를 참조하도록 하여야 한다.

(14) 지반조사는 발주청에 제출한 세부조사 시행계획서에 따라야 하며 과업의 증감이 있을 때에는 예산범위 내에서 정산 할 수 있다.

(15) 모든 토질시험은 한국산업규격에 따르는 것을 원칙으로 하되, 한국산업규격에 규정되어 있지 않은 시험은 ASTM 등 외국의 상응하는 기준을 따라야 한다.

3.3 입지여건조사

3.3.1 인문․사회현황

배후지역의 인구 및 가구, 교육시설, 문화재 및 관광자원 등을 조사하여 정리하고 배후지의 인문․사회현황이 개발에 미치는 영향을 분석하여야 한다.

3.3.2 산업 및 경제현황

(1) 계획대상항만의 직접·간접 세력권의 범위, 배후지역의 산업 및 경제 현황을 상세히 조사․정리하여야 한다.

(2) 조사된 산업 및 경제현황 등을 통하여 장기적인 지역경제발전 전망을 도출하고, 당해 지역의 산업 및 경제여건과 조화되도록 계획하여야 한다.

3.3.3 배후도로망 현황

(1) 계획대상항만의 배후도로망 현황을 조사하여 분석하여야 한다.

(2) 배후도로망 현황조사에는 다음의 항목이 포함되어야 하며 문제점을 검토하여야 한다.

◦ 도로현황

◦ 교통량 현황 등

(3) 조사된 배후도로망은 평면도에 알기 쉽게 표시하여야 하며 이 평면도에는 계획 또는 시공 중인 도로망이 포함되어야 하고, 기존의 시설과 시공 중인 시설, 계획시설 등의 개요를 알 수 있도록 하여야 한다.

3.3.4 동력 및 용수현황

(1) 배후지역의 동력사용과 공급시설(상수도 및 공업용수)현황을 조사하여야 한다.

(2) 상수도와 하수도현황을 조사․정리하여야 한다.

3.4 관련계획 검토

(1) 기본계획시 검토된 관련계획을 본 과업과 관련하여 종합적으로 검토하여야 하며, 기본계획이 시행되지 않았거나 기본계획 수립시 검토되지 않았을 경우에는 (2), (3) 항목에 따라 관련계획을 검토하여야 한다.

(2) 관련계획을 상위계획(광역계획), 지역관련계획, 교통시설관련계획, 항만관련계획 등으로 분리하여 종합·정리하고 조화있는 계획을 수립하며, 이를 근거로 본 과업의 사회․경제적 여건분석 및 장래 전망분석(해상화물량 및 육상교통량 추정)에 이용하여야 한다.

(3) 계획지구내 및 주변지구의 항만관련계획 또는 건설중인 공사를 조사·정리하여야 한다.

(4) 기본계획시 검토되었다 하더라도 변경 또는 취소된 계획이 있으면 그 내용을 보고서에 수록하여야 하며, 변경 또는 취소된 계획이 없고 기본계획 수립시 검토된 내용이 적정하면 기본계획시 검토된 내용을 요약·정리하여야 한다.

(5) 본 사업과 관련한 기타 법령과의 관련사항에 대하여 면밀히 검토하여 해당기관의 인․허가 등에 필요한 서류를 작성 제출하여야 한다.

3.5 지장물 및 지하매설물 조사

(1) 계획대상지역의 지장물 및 지하매설물을 조사하여야 하며, 이설이 필요한 경우에는 이설 방안에 대하여 검토하고 실시설계에 반영하여야 한다.

(2) 조사항목은 다음과 같다.

◦ 공공시설물                ◦ 전기 및 통신시설물

◦ 가스, 송유관, 해수인입 등  ◦ 상하수도시설물 및 기존 구조물

◦ 기타 시설물

3.6 공사용 작업장 조사

본 공사 시행을 위한 작업장(적출장, 각종 제작장 등)의 소요규모를 판단하고, 인근에 작업장 이용 가능 부지를 조사하여 필요시 신규작업장 조성 규모를 산정하여야 한다.

3.7 재료원 조사

(1) 토취장이 필요한 경우에는 조사된 토취장에 대한 제반조건 및 이용여부를 검토하여 설계 및 공사시행시 이용할 토취장을 감독자와 협의하여 선정하여야 한다.

(2) 골재원이 필요한 경우에는 조사된 골재원의 위치, 매장량, 골재종류 등을 검토하여 설계 및 공사시행 시 이용할 골재원을 감독자와 협의하여 선정하여야 한다.

(3) 평택·당진항은 평야지대에 위치하여 석재원 확보가 매우 곤란한 여건에 있어 일부 현장의 경우 고비용·저효율, 견적가 지정 석산마저 민원발생 등으로 개발이 중단되는 실정이므로 정부에서 석산을 지정·개발하는 방안 등, 공사의 효율성이 증대되고 경제성이 제고될 수 있도록 석재구입에 대한 대책을 제시하여야 한다.

(4) 아스팔트 콘크리트 또는 레미콘이 사용될 경우는 인근 공장의 사용골재의 품질, 운반거리, 운반소요시간, 생산능력 등을 조사하고, 항만구조물의 내구성 향상을 위한 특수콘크리트 사용결정시에는 이의 제조 및 품질확보 여건 등을 조사하여 이용 가능한 공장을 선정하여야 한다.

(5) 자원재활용 측면에서 이용가능한 자원을 조사하여 생산량, 경제성, 환경성 등을 검토하여 적용여부를 판단한다.

4. 수치모형실험

수치모형실험은 관리부두 설계를 위한 실험과 수로 준설계획 재검토를 위한 실험으로 구분하여 시행하여야 하며, 실험범위는 다음과 같다.

(1) 관리부두

◦ 관리부두 설계를 위한 외력조건 산정 및 운영시 유지준설량 산정, 공사중 및 운영시 발생하는 오염물질의 확산범위 산정과 저감대책수립을 위하여 다음과 같은 실험을 수행한다.

- 파랑변형실험     - 해수유동실험

- 퇴적물이동실험   - 오염물질확산 실험

(2) 수로구역

◦ 수로 준설구역 및 적정심도 재검토를 통한 단계별 준설 및 매립계획수립, 기존 시설물과의 이격거리 검토, 준설사면 및 기존 시설물의 안정성 검토를 위하여 다음의 실험을 수행한다.

- 파랑변형실험     - 해수유동실험

- 퇴적물이동실험   - 해수교환율 실험

4.1 파랑변형실험

(1) 파랑변형실험은 천해설계파 산정실험과 퇴적물이동실험을 위한 파랑변형실험으로 구분하여 시행한다.

(2) 심해파는 “전해역 심해설계파 추정보고서Ⅱ”(2005.12 한국해양연구원)에서 제시된 심해 설계파를 검토하여 적용하며, 만내풍파에 대하여도 검토하여야 한다.

(3) 파랑변형실험은 파랑의 천수, 굴절, 회절, 반사, 해저마찰, 쇄파변형 등 파랑변형 현상을 잘 재현할 수 있고, 실제 해역의 파랑, 흐름 재현성이 뛰어난 다방향불규칙파랑 모델을 사용하여 수행한다.

(4) 계산격자망은 여러 배치안을 충분히 검토할 수 있는 실험영역과 파랑전파를 정확히 재현할 수 있는 최소의 격자간격으로 설정한다.

(5) 최신의 해도, 수심도 및 지형도 등을 이용하여 해안선의 위치와 격자점의 수심을 모델에 재현한다.

4.2 해수유동실험

(1) 모델은 당 해역과 해양 특성에 맞는 것을 적용하여야 하며, 선진기술 보유국에서 새로이 개발 또는 적용되고 있는 수치기법 및 이론의 적합성을 갖춘 2차원 연직적분 모델을 사용한다.

(2) 모델의 대상 해역은 사업 시행에 따른 해수유동의 변화가 없는 지역까지 충분히 넓게 설정하며, 사업 지역에서는 격자간격을 좁게 구성하고 고해상도를 제공한다.

(3) 해안선 및 해저지형 입력시 최신의 해도, 수심도 및 지형도 등을 이용하여 해안선의 위치와 각 격자점의 수심을 모델에 재현한다.

(4) 현장관측 자료와 기존 자료를 최대한 활용하여 관측치와 모델 계산치를 비교, 검증한다.

(5) 수위, 유속 등의 관측치와 모델 계산치가 잘 일치할 때까지 반복 수행하는 방법으로 검증을 수행한다. 모델 계산치와 현장 관측치의 허용오차 범위는 조차의 경우 3%, 조시는 30분 최강유속과 조량은 20%로 한다.

(6) 검증과정을 통해 최적의 입력자료 및 개방경계 조건을 확정한다.

(7) 실험 조석조건은 대·중·소조기를 포함하는 15일 이상으로 한다.

(8) 검증과정에서 확정된 재입력자료 및 개방경계 조건을 바탕으로 발주자가 제공한 계획안에 대하여 예측실험을 수행한다.

(9) 사업시행에 따른 수위, 유속, 조량등 해수유동의 변화를 분석, 평가한다.

4.3 퇴적물이동실험

(1) 모델은 평택․당진항 해역의 퇴적환경을 고려하여 우리나라 서·남해안의 주요 항만설계에 적용실적이 있어 현장적용성이 입증된 2차원 퇴적물이동 모델을 사용한다.

(2) 모델의 입력자료인 유동장(시‧공간별 수위 및 유속) 및 파랑장(파고, 주기분포)은 각각 해수유동실험과 파랑변형실험 결과를  그대로 읽어 사용하여야 한다.

(3) 모델의 주요 입력자료인 퇴적물 특성자료(부유사의 입경, 침강속도, 공극율 등)는 해양조사 자료와 기존 조사자료를 종합하여 추출하여야 한다.

(4) 퇴적환경 분석결과, 사질 퇴적물의 이동에 대해서는 표사이동량 공식과 연속방정식 및 수심 보정방정식을 계산하는 2차원 표사이동모델을 적용하며, 니질(mud) 퇴적물의 이동에 따른 해저면 변화는 조류에 수반된 부유사의 침전(settling) 및 부상(resuspension)을 고려하는 부유사퇴적 모델을 적용한다.

(5) 준설구역의 경우, 준설단계별 침·퇴적 변화를 예측하고, 시설물 전면의 세굴 등 시설물의 안전에 미치는 영향을 검토한다. 또한, 수로구역 준설후 퇴적토의 입경분포를 예측하여 제시하여야 한다.

4.4 해수교환율실험

(1) 준설 단계별 수로구역의 해수교환에 미치는 영향을 평가한다.

(2) 모델의 입력자료인 유동장은 해수유동의 실험결과를 사용한다.

(3) 실험영역, 격자구성, 외력조건, 경계조건은 해수유동모델과 동일한 자료를 사용한다.

(4) 해수교환율실험은 입자추적법, 또는 염류의 이류·확산법 등을 통하여 시행하며 모의 대상 최소주기는 대․소조기를 포함하는 15일 이상으로 한다.

(5) 현상태 해수교환율을 산정하고, 실험안별 해수교환율 변화정도를 특정기한 교환율(%), 교환주기(일) 등으로 추정한다.

4.5 오염물질확산 실험

(1) 격자구성 및 수심인력 조건 등은 해수유동 실험과 동일하게 사용하며, 해수유동 실험결과를 이용한다

(2) 관리부두 공사중 및 이용시 오염물질 발생에 대한 예측실험을 수행하며, 실험은 확산범위가 준 정상상태에 도달할 때까지 계속 수행한다

(3) 공정별 오염물질 발생량에 대하여 실험을 수행하여 확산범위를 예측한다

(4) 예측결과에 따라 저감방안을 도출하고 저감방안별 실험을 수행한다

5. 항만현황 조사

5.1 일반사항

기본계획 수립 시 및 인근 지역 항만시설 설계시 조사된 항만현황 조사의 내용을 검토하여 그 내용을 요약․정리하여야 한다. 단, 상황의 변동 등으로 조사내용의 수정이 필요하거나 부분적으로 재조사가 필요한 경우에는 이에 대한 조사를 실시하여야 한다.

5.2 항만의 개요

계획대상 항만의 연혁과 발전과정, 항계 등을 조사하여 요약․정리하여야 한다.

5.3 항만의 특성

(1) 계획대상 항만의 특성을 배후수송망 및 주변지역의 공업단지 등 산업시설, 현재 이용상태, 기타 관련있는 사항 등과 연계하여 종합적으로 검토 요약하여야 한다.

(2) 항만의 특성에는 사회․경제적 측면에서의 계획대상 항만의 위치적 특성 및 국내항만에서의 위상, 배후도시의 특성 등이 포함되어야 하며 기능적인 관점에서의 계획대상 항만의 특성을 분석하여 그 내용이 포함되도록 하여야 한다.

5.4 항만시설현황

(1) 계획대상지구의 항만시설에 대하여 기본계획 수립시 및 인접 지역 항만시설 설계의 관련내용을 검토하여 조사․정리하여야 한다.

◦ 외곽시설                                      ◦ 접안시설

◦ 수역시설                                      ◦ 임항교통시설

◦ 보관시설 등

(2) 항만시설 현황에는 건설 및 계획중인 항만시설 현황이 포함되어야 한다.

(3) 대상항만의 취약시설이나 문제점 등을 검토하여 시설관리 및 운영의 효율성 측면에서의 종합의견을 제시하여야 하며, 기본 및 실시설계에 반영이 필요하다고 판단되면 발주청과 협의하여 설계에 포함하여야 한다.

5.5 항만이용현황

(1) 계획대상항만의 이용현황을 기본계획을 참고로 하여 아래와 같은 내용을 중심으로 파악하여야 한다.

◦ 선박입출항 실적                  ◦ 해상화물량 처리실적

◦ 항만하역능력 및 서비스 척도      ◦ 해역이용현황

◦ 항만관련업체                     ◦ 항만시설보호지구

◦ 종합의견

(2) 선박 입·출항 실적 및 해상물동량 처리실적을 조사·분석하여야 한다.

(3) 선박 입·출항 실적 조사 시에는 연안선과 외항선을 분리 조사하여야 하며, 톤급별로 정리하여야 한다.

(4) 해상화물량 처리실적을 조사할 때에는 전체 화물량 처리실적, 화물품목별, 외항화물과 연안화물별로 구분하여야 한다.

(5) 화물별 취급선박 규모, 이용빈도, 형태, 야적장 등 보관시설에 대한 이용현황을 조사·분석하여야 한다.

(6) 여객수송실적을 노선별, 목적지별로 조사·분석하여야 한다.

(7) 항만의 하역능력을 분석하고 이용자의 측면에서의 서비스 정도와 그 문제점을 조사․분석하여야 하되 국내의 타 항만과 외국의 경쟁항만의 자료를 조사하여 비교․검토하여야 한다.

(8) 공유수면점용 및 공작물설치 현황을 포함한 해역이용 현황을 조사하여야 한다.

(9) 해상화물의 일관 수송능력 확보를 위해서는 항만배후에 충분한 시설보호지구가 확보되어야 하므로 시설보호지구 현황을 조사․분석하여야 한다.

(10) 항만의 하역능력 또는 접안능력과 화물처리실적, 선박대기시간 등을 조사 또는 산출하고, 기타 필요한 자료를 분석, 대상항만의 이용현황에 대한 종합의견을 제시하여야 한다.

5.6 관공선 등 현황 및 기타사항

(1) 기본계획 수립시 계획대상 지역에 대한 관공선 및 역무선, 현황자료를 참고하여 조사를 실시하여야한다.

(2) 조사된 관공선 및 역무선 내용을 검토하고 기본계획 조사시 조사된 내용과 비교·분석하여 접안 및 수역시설 계획 수립시 반영하여야 한다.

6. 기본계획 재검토

6.1 일반사항

(1) 기본계획 내용 중 이 과업수행 내용과 관련되어 있는 항목(표준단면, 공법, 설계파, 지반조사 내용 등)은 세부적으로 검토하여 그 적정여부를 판단하여야 한다.

(2) 특히 “전국 무역항 항만기본계획수정계획 용역”과 연계하여 동 내용을 충분히 검토, 평택․당진항 개발에 지장이 없도록 반영하여야 하며, 동 용역의 결과에 의거하여 기본 및 실시설계를 시행하여야 한다.

6.2 주요 검토내용

(1) 기본계획시 수행된 내용중 다음의 내용을 검토하고 요약․정리하여야 한다.

◦ 개발여건 전망            ◦ 개발수요

◦ 개발방향                 ◦ 개발규모

◦ 배후수송체계 개선방안    ◦ 평면배치계획

◦ 항만시설계획             ◦ 토지이용계획

(2) 기본계획에서 검토되었던 연차별 건설계획, 연차별 투자계획, 공정계획을 검토하여 그 개요와 내용을 요약하여야 한다.

(3) 관리부두실시설계시 현재 여건을 감안하여 평택․당진항 운영에 지장이 없도록 형식 및 규모를 재검토하여야 하며, 평면배치계획을 포함한 세부실시설계를 수행하여야 한다.

(4) 평택·당진항 단계별 선석개발계획에 따른 연차별 관리부두 소요규모를 재검토하고 목표연도 2020년도의 관리부두 소요규모를 추정한다.

6.3 매립재 활용계획 검토

평택․당진항 장래개발계획을 기준하여 평택․당진항의 단계별 개발계획에 따른 적정 매립재 확보방안 및 활용계획을 검토·제시하여야 한다.

6.4 수로구역 적정 수심계획 검토

수로구역을 포함한 평택·당진항 일원의 수리특성(조위, 유속, 퇴적 등) 변화를 평가하고, 평택·당진항 단계별 개발에 따른 매립계획 등을 고려하여 평택․당진항 준설․매립, 평형 최적화 방안이 제시 될 수 있도록 항로․수로구역의 효율적인 준설 및 적정수심계획을 수립, 2010.06월말까지 제시하여야 한다.

7. 기본 및 실시설계

7.1 공통사항

(1)  구조물의 설계는 원칙적으로 “항만 및 어항설계기준(2005)”에 의하며 “항만 및 어항공사 전문시방서” 등을 참고하여 실시하여야 한다.

(2)  구조계산 등에 컴퓨터 소프트웨어를 사용하였을 때에는 사용 소프트웨어에 대한 설명과 함께 입력 데이터, 출력내용, 제한조건 등을 상세히 수록하여야 한다.

(3)  구조물 설계시 내진설계 적용여부를 검토하여야 한다.

(4)  기초구조물 설계시에는 활동(원호활동 포함), 전도, 지지력 등을 검토하여야 하며 구조계산서에는 검토과정을 알 수 있도록 상세히 수록하여야 한다.

(5)  구조물에 대한 설계는 강도설계법을 사용함을 원칙으로 한다. 다만, 구조물 또는 재료의 특성상 강도설계법을 사용할 이유가 없다고 판단될 경우에는 발주청과 협의하여 허용응력설계법을 사용할 수 있다.

(6)  해양콘크리트 구조물의 내구성 향상을 위하여 고내구성 콘크리트 사용을 우선적으로 검토하여 설계하여야 한다.

(7)  비교안 작성

◦ 중요 구조물의 설계는 각종 자료를 수집분석 검토하여 5개 이상의 구상안을 작성하여야 하며, 그중 가장 경제적이고 내구성이 있는 안을 선정할 수 있도록 3개안 이상(합리적인 비교를 위하여 각각의 안은 그 자체로서 가장 경제적이고 안전한 최적의 안이 되어야 한다)을 선택하여 이에 대한 구조계산 및 공사비, 장단점, 기타 필요한 사항 등을 검토․작성하여 최적안을 선정하여야 한다. 다만, 구상안의 수는 공사의 규모 등에 따라 발주청과 협의하여 조정할 수 있다.

◦ 각각의 비교안 검토시에는 유지관리비를 포함한 경제성 분석이 이루어져야 한다.

(8)  사전 협의사항

◦ 수급인은 과업진행 중 다음과 같은 세부사항은 이 과업지시서의 다른 항목에 특별한 규정이 없더라도 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

- 구조물의 위치, 형식 및 규모

- 적용공법

- 구조물의 표준단면(공사비를 산정을 위한 단면 포함)

- 도로의 노선, 표고, 포장설계

- 중요 건설자재

- 적용할 시공법 등

◦ 세부사항에 대하여 발주청과 협의를 하였더라도 하자가 발생할 시에는 수급인의 책임이 면책되는 것은 아니다.

(9) 수급인은 관리부두의 예산절감, 기능향상, 구조적 안전 및 품질확보를 위하여 건설기술관리법 시행령 제38조의13의 규정에 의한 설계의 경제성검토(Value Engineering)를 시행하기 위한 설계대상 시설물의 주요 기능별로 설계 내용에 대한 대안별 경제성 및 현장적용의 타당성에 대하여 용역진행 상황별로 발주청에 제출하여야 한다.

◦ 기본설계가 2/3정도 진행된 시점(단가구성이 가능한 시점)에 기본설계에 대한 VE 자료제출

◦ 실시설계가 2/3～3/4정도 진행된 시점(단가구성이 가능한 시점)에 실시설계에 대한 VE 자료제출

7.2 공법 및 단면검토

(1)  수급인은 과업대상시설을 경제적으로 건설하기 위하여 관련 공법에 대하여 최신 공법을 포함한 국내의 여러 공법 및 외국에서 사용 또는 개발된 최신 공법 등을 종합적으로 조사하여 그 장단점 및 시공조건, 시공사례 등을 검토․정리하여야 한다.

(2)  상기 (1)항에 의거 조사․정리된 자료를 이용하여 대상시설 건설을 위한 주요공법을 발주청과 협의하여 선정하되 주요공법 선정시에는 과업대상지역의 토질 및 지반조건, 수심 등 시공조건을 고려하여야 하며 공법선정의 객관적인 근거를 명확히 제시하여야 한다.

(3)  주요공법 선정시에는 이 과업지시서의 “7.1 (7) 비교안 작성”의 관련 내용에 따라 검토하여야 한다.

(4)  비교안 검토시 각 안별로 경제성분석(Engineering Economic Analysis)을 실시하여야 한다.

(5)  공법선정 후 구조물의 표준단면을 결정하여야 하며, 표준단면은 그 구조물 전체 단면을 대표할 수 있도록 적절하게 선정하되 구조계산에 관한 내용은 “7.4 구조계산” 항목을 따라야 한다.

(6)  지반조건 등의 상이로 구간별 표준단면이 다를 경우에는 앞의 (5)항에 따라 이를 검토하고 보고서에 수록하여야 한다.

(7)  주요 구조물의 표준단면 또는 구간별 표준단면은 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

7.3 공법선정의 한계성 검토

(1)  주요공법의 비교·검토 후 하나 이상의 공법을 선정할 경우, 그 선정과정에서 불확실한 조건이나 또는 자료가 없어 추정하여 공법을 선정하였을 경우에는 그 내용을 정리․요약하여 실시설계시 검토할 수 있도록 하여야 한다.

(2)  공법선정의 한계성은 실시설계시 기 선정된 공법이 실제 적용이 불가능하여 불가피한 공법 변경과 이에 따른 공사비 증가를 방지하기 위한 방향으로 검토되어야 한다.

7.4 구조계산

(1)  주요공법의 비교·검토를 위한 각 공법의 대표단면 결정시에는 각 단면에 대한 구조계산을 하여 최적 단면을 선정하여야 하며, 이의 판단 근거를 설명하여야 한다.

(2)  구조계산의 내용은 체계적으로 요약하여 발주청에서 쉽게 알 수 있도록 정리하여야 하며, 구조계산에 사용된 설계조건, 변수 또는 패러미터(parameter) 등을 명확히 보고서에 수록하여 그 내용을 알 수 있도록 하여야 한다.

7.5 세부수량 및 공사비 산출

(1)  과업대상시설에 대한 세부적인 물공량을 산출하고 공사비를 산정하여야 한다.

(2)  공사 착공 후 물공량 산정, 설계누락 등으로 인하여 총사업비가 증가되지 않도록 수량 및 공사비를 객관적이고 합리적으로 산출하도록 최대한 노력하여야 한다.

(3)  특히 토질조사 불철저로 인한 구조물의 심도 증가 또는 구조변경 사례발생으로 공사비 증가 및 공사지연이 되지 않도록 설계하여야 한다.

7.6 건설계획 수립

(1)  연차별 건설계획 수립

본 과업지시서에 의해 수행된 공사의 연차별 건설계획을 발주청과 협의하여 결정하고 이를 총사업비와 공종별로 정리하여야 한다.

(2)  시공계획 수립

◦ 공사시공을 위한 시공계획을 수립하되 다음의 내용이 포함되어야 하며 공정계획은 CPM기법(주공정계획법 ; critical path method)을 사용하여 수립하고 그 내용을 보고서에 수록하여야 한다.

- 자재 및 장비사용계획

- 공정계획

- 공사 작업장 확보계획(필요시)

- 기타 시공시 특히 필요한 사항

◦ 공사기간은 CPM으로 정확하게 산정하여 차후 공사시공자가 품질확보에 지장이 없도록 하여야 한다.

(3)  지장물 및 지하매설물 이설계획

◦ 계획대상지역내의 지장물 및 지하매설물 현황을 파악하고 이설 또는 보강이 필요할 시에는 이에 대한 대책을 수립하여야 한다.

◦ 지장물 및 지하매설물 현황파악과 대책은 육상과 해상지장물로 구분하여 정리하여야 한다.

(4)  안전관리 및 품질관리 계획

◦ 공사 시공중에 유의하여야 할 안전관리 사항과 품질확보를 위한 품질관리 계획을 수립하여야 한다.

◦ 안전관리 및 품질관리계획은 공사시방서에 그 내용이 상세히 수록되어야 한다.

(5)  시험시공

공사시행중 품질확보를 위해 시험시공이 필요한 경우에는 이에 관하여 검토하여야 하며 시험시공과 관련하여 유의하거나 관측하여야 할 사항은 공사시방서에 그 내용이 포함되어져야 한다.

7.7 관련 서류 및 기타자료 수집․작성

(1)  공사 시행 전 또는 시공중에 공사와 관련하여 관계부서 협의사항이 필요한 경우에는 이에 대한 관계법규를 검토하여 자료를 수집․정리하여 제출하여야 한다.

(2)  사업비의 예산확보를 위해 필요한 기본자료를 발주청과 협의하여 작성하여야 한다.

(3)  기타 이 사업시행과 관련하여 필요한 서류가 있어 발주청이 지시할 때에는 관련 자료를 수집․정리하여야 한다.

7.8 설계도서의 작성

본 과업지시서의 「12. 설계도서 작성방법」항목을 참고한다.

7.9 실적공사비 작성

실적공사비 축적을 위해 설계서, 설계예산서 등은 정부제정 산출기준과 실적공사비 및 표준품셈규정에 따라 발주청과 협의하여 작성하여야 한다.

8. 분야별 세부수행 기준

8.1 콘크리트 설계기준강도

각 콘크리트의 구조물별 설계기준강도는 항만 및 어항설계를 기준으로 하되 아래의 기준을 적용할 수 없는 특별한 이유가 있을 때에는 발주청과 협의하여 조정할 수 있다.

구 분	구 조 물	설계기준강도
무근콘크리트	본체블록, 이형블록(소파, 피복), 계류시설 상부공	18 N/mm2
철근콘크리트	L형, 소파블록, 케이슨, 잔교상부공, 중공블록	35 N/mm2
	에이프론포장	휨강도 4.5 N/mm2

8.2 철근콘크리트 구조물

(1)  철근콘크리트 구조물의 철근배근도를 작성할 때에는 굵은골재의 최대치수를 고려하여 시공이 용이하도록 철근을 배치하여야 하며, 특히 모서리 부분이나 복잡한 부분은 철근의 피복두께가 확보될 수 있도록 특히 유의하여야 한다.

(2)  철근배근이 복잡하여 시공시 품질확보에 세심한 주의를 요구하는 경우에는 이 내용을 공사시방서에 포함하여 품질확보가 가능하도록 하여야 한다.

8.3 접안시설

(1)  접안시설은 토질, 수심, 파랑, 조위, 시공성 등을 고려하여 경제적이고 적합한 구조형식이 되도록 선정하여야 한다.

(2)  접안시설 건설에 대한 신공법이 있을 때에는 이를 포함하여 검토하여야 하며 항만건설 기술 향상을 위해 외국의 시공 사례 등을 감안하여야 한다.

(3)  설계시 고려해야 하는 일반적인 외력은 다음과 같으며 이외 구조물의 안전에 영향을 미칠 수 있는 외력이 있을 경우에는 이를 고려하여야 한다.

◦ 선박의 접안력

- 대상선박의 선형에 따른 접안속도

- 선박의 운동에너지

- 유효접안에너지

◦ 선박의 견인력(직주의 경우 연직력 포함 검토)

◦ 풍압력

- 구조물에 작용하는 풍압력

- 선박에 작용하는 풍압력

◦ 조류력

- 선박의 진행방향으로 흐르는 조류

- 선박의 측면에서 흐르는 조류

◦ 파력

- 구조물에 작용하는 파력

- 해수중의 물체에 작용하는 파력

◦ 양압력

◦ 토압

◦ 잔류수압

◦ 사하중

◦ 적재하중(큰 집중하중 작용시에는 별도 검토)

◦ 활하중(크레인 하중. 자동차 하중, 군집하중 등)

(4)  계선안에는 선박이 접안할 때 선체와 구조물의 손상을 방지하기 위하여 적절한 완충설비를 선택, 배치하여야 한다.

(5)  계류시설의 일반적인 상재하중은 취급화물에 따라 결정하여야 한다.

(6) 함선시공방법 개선

◦ 현재 재래식으로 사용되고 있는 도색방법은 내구성이 저하되고 LCC(유지보수)비용 등이 과대하게 소요되는 실정인바, 경제성이 제고되고 시공의 효율성이 증대되는 기술 경쟁력 있는 시공방법을 제시 후 적용하여야 한다

8.4 호안시설

(1) 호안의 설계시에는 파랑, 수심, 조류, 기초지반의 토질, 지진 및 지진시의 동수압, 시공법, 매립공법 등을 고려하여야 한다.

(2) 호안 천단고는 직립식 호안의 천단고와 상부 친수시설 토지이용계획, 월파고 등을 고려하여 적정 높이로 결정하되 발주청과 협의하여야 한다.

(3) 호안 축조와 관련하여 장래계획을 충분히 검토하여 호안 단면을 결정하여야 한다.

8.5 준설 및 매립

(1) 준설은 기상, 해상 및 지형조건과 토질조건을 충분히 파악하여 계획하여야 하며, 준설선의 능력, 토질조건 등을 고려하여 준설방법 및 준설선단을 구성하여야 하며, 경제적이고 합리적인 준설·매립계획을 수립하여야한다.

(2) 매립에 있어서는 해상, 기상, 원지반 및 토취장의 토질조건을 사전에 충분히 파악하고 매립지의 사용목적, 사용시기, 매립지 계획지반고 등을 고려하여 가장 경제적인 매립방식을 결정하여야 한다.

(3) 호안 축조와 관련하여 장래 매립지내 배수에 지장이 발생하지 않도록 배수시설을 검토하고 적절한 처리계획을 수립하여야 한다.

(4) 방사용 Mat를 사용할 때에는 배면토압에 의한 Mat 파열방지 방법을 강구하여 계산에 의거 설계에 반영하고 각종 Mat 재질에 대한 시방을 제시하여야 한다.

(5) 공사용 도로 및 기타시설이 필요할 경우 이를 검토·반영하여야 한다.

(6) 매립지에 대하여 원지반의 토질조건을 조사하여 침하율 및 침하기간을 고려하여 부지이용계획 및 개발계획에 부합되도록 침하공법을 제시하여야 한다.

① 매립공사 및 지반개량공사 시행내용과 조사된 토질성과를 지반개량 설계시 반영하여야 한다.

② 설계조건 검토 및 산정

가. 구역별 하중조건

나. 잔류 침하량

다. 부지조성 계획고

③ 지반개량 설계시 고려사항

가. 지반개량 대상토의 검토 분석

◦ 토질정수 등의 토질특성

◦ 두께 및 형상

◦ 기타 지반개량 설계와 관련한 사항

나. 지반개량공법 선정 및 설계와 관련한 사항

◦ 지반개량 대상토 결정

◦ 경제성, 시공성, 공법의 신뢰성, 공기 등 장․단점 비교

◦ 설계구조 분석 계산

- 지반개량체 시공간격

- 침하량(매립시, 과재후, 잔류허용치)

- 과재성토고, 재하기간, 성토시 안정계산

- 지반강도 증가량

- 침하보충토 두께

- 기타 필요한 항목

다. 시방 및 시공관리 분야

◦ 소요자재(드레인재, 채움재, 샌드매트 등)의 품질조건, 구득원, 시공방법

◦ 지반개량공사 순서 결정(개량심도별, 구역별)

◦ 시공장비 제원 및 특성, 시공사례, 공사방법

◦ 지반개량시 배수계획(탈수, 우수처리)

◦ 계측기기 선정 및 수량, 계측방법, 결과 이용방법

◦ 집수정등 부대시설 시공방법

◦ 침하보충토 시공방법(성토1층 두께포함)

◦ 압밀효과(완료) 판단방법 및 과재토 제거시기

◦ 재하토 제거표고 및 노상토 시공방안

라. 기타 설계시 검토사항

◦ 집수정 및 유공관등 설계관련

◦ 이질매립층 구역(있을 경우) 개량

④ 사업지역내 지형조건, 토질조건이 설계내용과 상이하여 발주청에서 설계서 수정, 보완을 요구할 경우 수급인은 공정추진에 지장이 없는 기간내에 수정, 보완하여야 한다.

8.6 도로 및 포장

8.6.1 일반사항

(1) 노선선정은 기본설계 결과를 따르되 대안이 있을시에는 장·단점 등을 비교 검토 후, 발주청과 협의하여 최적(안)을 결정하고 실시설계에 착수하여야 한다.

(2) 구조물의 설계는 구조물의 위치, 주변상황, 기존 구조물과의 간섭, 장래 연계되는 시설물 및 개발계획 등을 충분히 검토하여 결정하여야 한다.

(3) 도로의 구조형식은 미관, 시공성, 안전성, 경제성 등을 고려하여 현지 여건에 맞는 설계교통량, 설계속도를 결정하여야 한다.

(4) 도로의 부대시설은 교통안전 및 조형미를 고려하여 설계하여야 한다.

8.6.2 토공설계

(1) 토공설계는 관련된 제 구조물과의 관계를 고려하여 가급적 절․성토량이 균형을 이루도록 평면 및 종단선형을 계획하여야 하며, 횡단구성 요소로서의 절․성토법면 경사는 토질조사 결과 및 제반자료에 의거, 안전성 및 경제성을 고려하여 결정하여야 한다.

(2) 일상적인 사면구배 기준치 적용이 곤란한 대사면 구간이나 기반암과 붕적토와의 경계선 및 용출수 위치, 기반암의 층리 및 절리의 경사방향과 균열상태 등의 절취비탈면 붕괴예상 구간에는 실측치 및 토성시험 결과치를 활용하여 적정 구배가 되도록 설계하여야 한다.

(3) 노상의 지지력이 부족하다고 판단될 경우 양질토를 사용한 치환 등의 지지력 보강공법 및 연약지반처리, 노상안정처리공법 등의 대책을 수립하여야 한다.

8.6.3 횡단구조물 및 배수시설물의 설계

(1) 횡단구조물 및 배수시설물의 설계는 수로 및 유수의 방향과 계획도로의 토공 및 구조물과 연계하여 필요한 개소에는 배수시설을 설치하도록 설계하여야 한다.

(2) 구조물별 설계빈도는 하수도시설기준(한국상하수도협회, 2005)을 적용하여 설계하여야 한다.

(3) 수로 및 유수의 방향을 표시하고 배수유역도를 작성하여 현지조사를 통하여 배수구조물의 위치선정을 최종 결정하여야 한다.

8.6.4 포장설계

(1) 포장구조는 아스팔트 콘크리트포장과 시멘트 콘크리트포장을 비교·검토하되 포장공법에 관해서는 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

(2) 포장설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량 등의 기초자료에 의거 설계하여야 한다.

(3) 표층 및 기층용의 가열아스팔트 혼합물은 용도, 교통조건, 기상조건, 지형조건 등 제반사항을 고려하여 검토한 후 적합한 입도의 혼합물을 결정하고 혼합물 입도선정 근거자료를 명시하여야 한다.

8.7 부대시설

8.7.1 급·배수시설

(1) 관리부두 배후지역의 침수발생여부 검토 및 배수량을 산정하고 배수방향과 배수 종말계획고 등이 만조시에도 배수가 용이하도록 전체 배수계획을 작성하여야 한다.

(2) 급수는 부두시설을 고려하여 소방용수 및 생활용수, 선박급수 등을 해당 법규에 알맞게 계획하여야 하며, 차후 추가용량 등을 고려한 관망으로 설계하여야 한다.

◦ 관계법에 의한 인․허가 협의 관련도서 작성

◦ 행정기관 및 관련기관의 협조에 대한 조치

8.7.2 관련시설부지

(1) 관리부두 운영시 관련시설의 종류를 고려하여, 포장방법, 두께 등을 결정하여야 한다.

(2) 관련시설부지는 부두운영의 효율성을 확보할 수 있도록 충분한 면적을 확보할 수 있도록 계획하여야 한다.

8.7.3 전기설비

(1) 부두내 조명은 야간에도 원활한 선박접안이 가능하도록 설계하여야 한다.

(2) 등기구 및 전주설계에는 부식방지 대책이 강구되어야 하며 경제성 및 내구성을 고려하여 선정하여야 한다.

(3) 기존 시설과 장래시설(기타 부속건물 포함) 및 항내 유관기관 등 항내 전 지역에 소요되는 전력 등의 제반자료를 수집한 후 이에 의거 전력, 통신 등에 대한 전반적인 공급방안을 검토하여 실시설계를 하여야 한다.

(4) 기타 부두의 용도 및 필요에 따라 선박용 육지전원 및 육지 전화시설을 검토하여 실시설계에 반영하여야 한다.

8.7.4 울타리 및 출입문시설

(1) 부두울타리는 주위경관을 고려하여 보안규정에 맞게 설치되어야 하며, 해풍에 대하여 내구성이 강하고 유지비가 저렴한 재료를 선택하여야 하며, 국토해양부에서 제정한 보안울타리 적용방안을 강구하여야 한다.

(2) 출입문은 주위 경관 및 부두출입, 통제업무가 원활히 이루어질 수 있는 구조로 설계되어야 한다.

8.7.5 기타

(1) 남측호안 공사에서 철거된 블록은 관리부두 단면계획 시 본 공사에 유용할 수 있도록 유용방안을 강구하고, 유용 후 남은블록에 대해서는 타 공사에 활용할 수 있도록 유용방안을 수립․제시하여야한다.

(2) 동절기 평택·당진항내 항만배후도로에 원활한 제설작업이 될 수 있도록 적절한 제설방안(제설장비 임대 및 인근 국도유지관리사무소, 지자체협의를 통한 제설장비 운용방안 등)을 수립·제시하여야 한다.

(3) 항만개발 적산기준 마련을 위한 일본적산설계기준을 번역하여 제출한다.

(4) 평택항 서부두(5, 6, 7번 선석)의 3개사 시멘트 사일로에 대하여 지역특성 및 평택항 관문 이미지에 부합되는 색체 디자인은 제시하여야 한다.

9. 종합 및 건의

(1)  이 과업수행의 결과를 종합하여 요약함으로서 이 과업에 의한 과업수행결과를 쉽게 알 수 있도록 하여야 한다.

(2)  과업시행과 관련하여 특기사항 등 중요사항이 있을 때에는 그 내용을 검토하여 보고서에 수록하여야 한다.

10. 문화재지표조사

10.1 사전조사

(1) 각종 문헌, 전래자료를 수집․분석하여 조사대상수역과 주변지역의 수장 문화재의 분포 여부를 확인한다.

(2) 수중문화재 발견신고지역 여부를 확인한다.

10.2 위치측정 및 조사선운행

(1) 조사전 계획된 조사수역내 항적과 조사정점 수면위치를 고정밀의 DGPS로 확인한다.

(2) 조사선은 계획된 조사측선을 컴퓨터 모니터 상에 투영하여 이를 따라 운행함과 동시에 실제 항적과 정점의 위치조사를 초 단위로 수신하여 전용 컴퓨터에 입력한다.

(3) 조사선은 조사장비에 대한 소음효과를 최소화하여 양질의 자료를 획득하기 위해 시속 2~3노트(4~5km/시)로 운행한다.

10.3 수중지형조사

(1) 조사수역내 계획된 항적을 따라 위치 측정과 동시에 연속 수신 측량으로 수중저 지형도면을 작성하여 지형의 형성기작을 파악한다.

(2) 음파탐사장비의 수중 음속보정을 위한 바체크를 실시한다.

(3) 최종 지형(수심)도는 조사수역에 최대 근접한 저점의 기준항 조석자료를 참고하여 일반 해도작성 방법에 따라 작성한다.

(4) 다만, 발주청 제공의 수심도가 조사에 적절히 이용될 수 있을 경우에는 수중지형조사는 이로 대체 할 수 있다.

10.4 수심측량 및 지층탐사

수심측량 및 지층탐사는 본 과업지시서「3.2.3 수심 및 지층탐사」항목에 의하여 실시한다.

10.5 해저면 영상 조사

(1) 해저지층탐사 시 측량선에 Sidescan Sonar를 설치하여 해저면의 지형을 연속적으로 획득한다.

(2) 105Hz을 기본주파수로 하며, 이상물체 분포지역에서는 500Hz의 고해상 해저면 영상자료를 획득한다.

(3) 수심의 기복이 심하거나 상대적으로 깊은 곳에서는 적절한 예인방식을 선택한다.

(4) 조사시 각 측점의 위치와 함께 Tow fish의 예인거리, 항로 및 예인 각도 등을 동시에 기록하여 위치의 오차를 최소화한다.

(5) 해저기록의 선명도와 해상도가 탐사 목적에 맞는 최상의 상태를 유지하도록 하여 정밀 분석한다.

10.6 지자기조사

(1) 지자기 조사에는 정밀도가 높고 분극시간이 짧은 자력계(magneto meter)를 사용한다.

(2) 정밀한 조사를 위해 자력의 영향을 최소화 할 수 있는 목선을 이용한다.

(3) 해상상태가 좋은 경우 퇴적층내에 매몰되어 있는 이상물체의 확인을 위해 가능한 범위내에서 센서를 최대한 해저 가까이에 투입하여 조사한다.

(4) 지자기 조사를 실시, 이상물체를 확인할 경우, 위치 등을 표시한 후 지층탐사 도면과 상호대비를 통해 이상물체를 재확인한다.

10.7 잠수조사

각종 탐사자료(지층탐사, 해저면 영상 조사 및 지자기 조사) 성과를 분석하여 이상 물체 존재가 의심되는 지역에 대하여 잠수부를 투입, 유물의 존재여부를 확인한다.

10.8 보고서 작성

보고서 작성은 문화재청 지표조사 처리지침에 포함하여야할 필수내용을 모두 기술하여야 하며, 보고서는 문화재청 심의 자료로 활용할 수 있도록 한다.

11. 사전재해영향성검토

11.1 공통항목

(1) 기존의 지형여건 등 주변 환경에 따른 피해발생 등의 재해위험요인 검토

(2) 인근지역이나 시설에 미치는 재해영향 및 예방에 관한 사항 검토

◦대상지역의 개발계획으로 인한 인근지역 및 시설물 등에 미치는 재해영향의 예방에 관한 사항을 포함하였는지 검토

(3) 대상지역에 자연재해위험지구 등의 포함 여부

◦과거재해발생 현황 등의 조사 여부

(4) 대상지역내 침수위험지구 현황 및 침수가능성 검토

◦대상지역 침수위험지구가 포함되는지 확인

◦인접수계의 홍수위보다 지반이 낮은 지역 및 최근에 침수피해가 발생한 지역인지 확인

◦개발계획으로 인하여 주변지역 등의 침수 가능성 검토

(5) 개발계획 현황 및 주변 토지이용계획과 재해예방에 관한 사항 검토

(6) 대상지역 내 하천 및 소하천의 포함 여부

(7) 자연재해 저감시설 현황 및 재해예방에 관한 사항

11.2 입지 및 협의대상 유형별 검토

(1) 상습해일 등의 피해우려 지역에 대한 대처계획

(2) 매립으로 인한 해수면 상승여부 및 영향에 대한 검토

(3) 지반이 낮은 지역에서는 방류구가 낮아 조위 상승 시 우수배제 가능시간이 짧아져 내수침수 원인이 되므로 방류구의 위치변경, 해수 역류 방지시설 계획 등의 재해예방 대책이 수립되었는지 검토

(4) 개발로 인한 토사 이동으로 인한 해안선 침식 및 퇴적, 백사장 파괴 여부 및 영향에 대한 검토(세굴 및 퇴적으로 인한 항내매몰 등 영향 분석과 예방사항 검토)

(5) 개발로 인한 조류변화와 영향에 대한 검토

(6) 하천과 조류의 상호작용으로 인한 영향예측 및 검토

(7) 연약지반 침하 등에 의한 피해 가능성에 대비하도록 검토

12. 교통시설 투자평가서 작성

12.1 관련규정

◦ 필요시 「국가통합교통체계효율화법」 제18조 규정에 의한 공공교통시설 개발사업중 총사업비가 300억원 이상인 개발사업을 대상으로 교통시설 타당성평가 실시

12.2 목적 및 평가방법

◦ 「국토해양부 교통시설 투자평가지침서」에 의한 방법 적용

13. 해역이용협의

13.1 해역 이용협의

o 본 과업 수행시 준설토 발생으로 해역 이용협의가 필요한 경우 관계기관과 협의를 시행하고 설계에 반영하여야 한다.

14. 설계도서 작성방법

14.1 공통사항

(1)  수급인은 발주에 필요한 일체의 설계도서를 작성․제출하여야 하며 설계도서의 크기, 형식 등은 발주청과 협의하여 다음 사항이 포함되도록 하여야한다.

◦ 설계설명서                 ◦ 공사시방서

◦ 동원인원계획표             ◦ 예정공정표

◦ 예산(설계)내역서            ◦ 일위대가표

◦ 수량계산서(토적표 포함)     ◦ 단가산출기초(중기사용료 포함)

◦ 주요자재표                 ◦ 구조계산서

◦ 설계도면

(2)  설계도서는 시공자가 쉽게 이해할 수 있도록 작성하여야 하며 공사시방서와 공사내역서, 설계도면이 상호 일치되게 작성하여야 한다.

(3)  설계도서는 원칙적으로 우리부의 “건설공사집행규정”에 따라서 작성하도록 한다.

(4)  구조물별로 또는 동일 구조물이라 하여도 부위별로 각각 소요 콘크리트강도와 굵은골재 허용 최대치수 등을 설계도면과 공사시방서에 명기하여야 한다.

(5)  설계내역서 작성시 실적공사비 축적을 위해 정부 제정 산출기준(국토해양부 발행 : 수량산출지침서)에 의거 설계도서를 작성․ 제출하여야 한다.

(6)  설계도서 작성은 국토해양부 항만건설 통합정보시스템(Port CIS)에 따라 “항만건설사업의 용역 및 공사 성과품 설계도서 작성지침서”와 “설계도면 작성 및 납품지침”에 의거 성과품을 납품하여야 한다.

14.2 설계도 작성

(1)  설계도면은 “항만․어항건설공사 전자도면 작성편람(2005.12)”의 규정에 부합될 수 있도록 발주청과 협의하여 작성․납품하여야 한다.

(2)  구조물 부위중 특히 시공에 유의하여야 할 부위나 구조형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도 설계상세도를 작성하여야 하며, 시공시 필요한 시공상세도면의 작성목록을 별도로 작성하여 시공시의 품질관리가 적정하게 이루어지도록 하여야 한다.

(3)  구조물의 일반도, 측면, 정면도 및 복잡한 부위에 대한 상세도를 그려야 한다.

(4)  단계별 시공을 고려하여 설계도면을 작성하여야 하며 절단부 및 이음부는 품질관리를 위해 상세도를 작성하여야 한다.

(5)  철근배근도, 철근수량표를 작성하여야 하며, 특히 단부 등에 대한 상세배근도와 철근피복두께 확보 및 정․부철근 등의 간격유지를 위한 받침 및 간격유지재의 재료 및 설치위치도, 상세도를 작성하여야 한다.

(6)  구조물 도면에 발생 가능한 균열(crack)의 종류, 허용폭 등에 대하여 서술하고 균열발생시의 처리방법 등에 대하여 명시하여야 한다.

(7)  상세도로 표시할 수 없는 주의사항(시공시 유의사항 등)에 대해서는 우선적으로 도면에 명기하고 그렇지 못할 경우에는 공사시방서의 각 절(section) 내의 “4. 특기사항” 또는 공사시방서의 마지막 부분(part) “ 특별사항” 내에 필히 작성되어져야 한다.

14.3 공사시방서 작성

(1)  공사시방서는 설계도면 등에 표현될 수 없는 내용과 보충 설명하는 사항, 시공과정에서 필요한 기술적인 사항 등이 포함될 수 있도록 작성하여야 하며 시공과정에서 분쟁 또는 클레임(claim)이 발생되지 않도록 유의하여 작성하여야 한다.

(2)  공사시방서는 “항만 및 어항공사 전문시방서”를 기준으로 하여 작성하되 항만 및 어항공사 표준시방서 등 기타 본 공사의 시행과 관련된 표준시방서를 참고로 작성하여야 한다.

(3)  공사시방서의 항목은 설계내역서의 공종에 따라서 작성하여 쉽게 검토․이용할 수 있도록 하여야 한다.

(4)  공사시방서의 항목별 작성기준(format)은 다음과 같아야 한다.

◦ “1 일반사항”

◦ “2 재료”

◦ “3 시공”

◦ “4 특기사항”

(5)  본 과업에 의하여 시공되는 공사와 관련하여 공종별로 특별히 고려하여야 할 사항은 앞의 (4)항의 “4 특기사항”에 상세하게 각각 기술하여야 하며, 개별항목(section)에 포함시키기 어려운 경우에는 통합하여 공사시방서의 가장 뒷부분에 “특별사항”이라는 제목(Title)으로 그 내용을 상세히 작성하여야 한다.

(6)  본 과업에서 검토된 안전관리 및 품질관리, 기타 설계도면 작성시 도면에 표기되어질 수 없는 내용등 공사시공과 관련하여 필요한 내용은 공사시방서에 포함되어야 한다.

15. 성과물 제출

(1)  수급인은 과업수행 과정중에 생산된 각종 조사, 연구, 검토결과를 정리하여 실시설계보고서를 작성, 제출하여야 한다.

(2)  실시설계 보고서에는 각종 보고서(조사보고서, 구조계산서등 모든 보고서)에 대한 목록이 포함되도록 하여 본 과업과 관련하여 제출되는 보고서의 종류와 종류별 권수를 언제라도 알 수 있도록 하여야 한다.

(3)  수급인은 각종 설계도서를 아래와 같이 작성하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 발주청과 성과물 항목 및 수량조정 등을 협의하여 조정할 수 있다.

◦ 기본 및 실시설계 보고서 및 부록 : 30부

◦ 설계도서

- 설계내역서 : 10부

- 설  계  도 : 10부(A3)

- 공사시방서 : 10부

- 수량 및 단가산출서 : 10부

- 구조계산서 : 10부

◦ 조감도(A1 size) : 2부(원판 1부 포함)

(4)  기 타

◦ 각종 측량성과물 : 1식

◦ 지반조사 및 실내시험 성과물 : 1식

◦ 사진첩 : 1부

◦ CD(보고서 및 부록, 설계도서 수록 ) : 1식

◦ 기타 이 과업수행으로 인하여 생산되는 각종 도서 등 : 1식

□ 사업 위치도

□ 현지조사 위치도