	성남시 맑은물관리사업소		성남시 상수도관로 누수탐사 용역

-수정․ 중원구 상수관로-

누수탐사 과업지시서

2010. 2

성남시 맑은물관리사업소

(수도시설과)

Ⅰ. 총  칙

1. 과 업 명

수정, 중원구 상수도관로 누수탐사 용역

2. 과업의 목적

본 용역은 우리시 수정,중원구 급수구역29개블록 과업 대상지역의 상수관로에 대하여 누수탐사를 실시하여 유수율을 향상시켜 효율적인 관망관리로 유수율 제고 및 상수도경영합리화에 만전을 기하는데 있음.

3. 과업의 대상지역

가. 시설현황

구분	급수전	관로연장(㎞)				블록수	비고
		계	송수관	배수관	급수관
누수탐사	31,924	330.304	7.974	120.451	201.879	29

나. 대상지역 : 29개블록

(2,4,5,6,11,13,18,19,20,21,24,25,29,30,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,54,57,58블록)

4. 과업개요

공 정	단 위	수 량	적 용	비 고
작업준비 및 계획	km	322.330	기존자료 이용
현장시설물현황조사	km	322.330	기존자료 이용
노면음청조사	km	257.864	배․급수관 연장의80%적용
상관식탐사	km	72.271	배수관 연장의 60%적용
하수도조사	km	60.226	배수관 연장의 50%적용
관로노선확인	km	48.181	배수관 연장의 40%적용
확인조사	km	128.932	배․급수관 연장의 40%적용
지하정보수집	블럭	29.0

5. 과업의 목표

가. 목표 적출건수 : 140건 이상

나. 계약상대자는 준공일 2개월전까지 목표에 도달하지 못한 경우에는 과업대상지역의          인근 블록으로 과업대상을 변경할 수 있다

6. 과업 수행기간

가. 본 과업은 착수일로부터 9개월간으로 한다.

나. 계약상대자는 계약일반조건에 의한 사유발생시 서면으로 계약기간 변경을 청구

하여야 한다.

7. 설계변경 조건

계약일반조건 및 다음 각 호의 경우 계약상대자는 감독원(“감독원”이라 함은  과업에 대한 관리․감독 업무를 위임 받아 수행하는 자를 말한다)과 협의하여 과업의 내용을 변경할 수 있다.

가. 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산변경

나. 민원 등 불가피한 사유로 과업 일부 또는 전부의 수행이 불가능할 때

다. 계약상대자는 수정, 중원구 전블럭을 대상으로 TM(원격관리시스템)을 분석하여          대상지역의 블록이 누수발생량이 많을것으로 판단되면 발주처와 협의하여 대상          블럭을 변경 할 수 있다.

8. 주요 업무의 사전승인 등

계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 감독원의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

가. 사업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

나. 관계기관과의 협의사항

다. 이 과업지시서에 의해 감독원의 승인을 받도록 한 사항

라. 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

9. 과업수행 공정보고

가. 착수신고서 제출

계약상대자가 과업착수시 제출할 착수신고서와 이 착수신고서에 포함하여 제출할         서류의 내용과 서식은 다음 각 호와 같다.

1) 착수신고서(별지 제1호 서식)

2) 사업수행계획서

3) 인력(장비)투입계획서

4) 세부공정계획서

5) 사업책임기술자선임신고서(별지 제2호 서식)

6) 사업수행 조직표

7) 건설기술 경력사항 확인서

8) 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간(별지 제3호 서식)

9) 참여기술자의 보안각서(별지 제4호 서식)

10) 과업내역서

나. 진도보고

계약상대자는 과업수행 기간 중 다음사항을 포함한 진도보고를 매월 화요일을         기준으로 하여 사업책임기술자의 확인을 받아 감독원에게 제출하여야 한다.

1) 과업추진내용 및 공정현황

2) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

3) 차주 과업수행 계획

다. 중간보고

계약상대자는 감독원의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고       설명토록 하여야 하며 감독원의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)에 대하여는              성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

1) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

2) 분기별 중간 보고시

3) 주요계획 및 방침의 설정과 변경시

라. 민원

계약상대자는 과업을 수행하기 위하여 토지의 사용 및 벌목, 단수, 이토발생           등으로 인한 민원 또는 행정처분이 발생치 않도록 민원업무를 수행하여야 하며,         발생즉시 감독원에게 보고(구두)하고 발생일시, 원인, 조치내용 등을 명기하여         서면보고하여야 한다.

마. 관계기관 협의 등

1) 계약상대자는 관계기관 협의 등 발주처에서 시행하는 업무를 충실이 지원             하여야 한다.

2) 계약상대자는 과업수행과정에서 관계기관과의 협의가 필요한 사항에 대하여는             사전에 감독원의 승인을 받아 협의를 할 수 있으며, 그 결과를 보고하여야 한다.

3) 과업수행 기간 중 관계기관과의 협의가 필요한 사항에 대하여는 협의를               실시하고 그 결과를 검토하여 적정방안을 수립․제시하여야 한다.

10. 용역감독 등

가. 용역감독

본 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무          내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 설계도서 작성현황, 현장세부조사 및 분석 등의 업무수행 상태

2) 기타 확인에 필요한 사항

나. 용역점검

감독원은 용역업무수행에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며 특별한         사유가 없는 한 계약상대자는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

11. 계약상대자의 책임

가. 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 과오나 오류 등으로 인한         과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은           아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 수정․보완요구가         있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

나. 문서의 기록비치

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 지시          및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며,         제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

다. 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야          하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여          책임을 져야 한다.

라. 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한            모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

12. 용역대가의 지급

가. 용역대가는 산출내역서상의 계약금액으로 한다. 단, 최종 준공일 까지 목표에          도달하지 못한 경우 단가 항목에 대하여 이행수량 만큼 증감에 따라 정산한다.

ꋮ 노면음청조사 수량(km) / 목표 누수건수 = km/누수건수

ꋮ km/누수건수 x 발견된 누수건수 = 노면음청조사 이행수량(km)으로 인정

ꋮ 이행수량(km)을 노면음청조사 단가항목 수량에 적용하여 금액을 정산한다.

나. 굴착확인결과 오탐으로 판명된 경우에는 수량에서 제외한다.

13. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 이 과업이 국가중요사업인 점을 인지하고 정부 또는 우리시에서          정한 모든 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를           다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

나. 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의          과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

14. 용어의 해석

과업지시서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 감독원과 계약상대자가 상호 협의하여 결정 하여야 한다.

15. 용역수행자의 교체

가. 이 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며,            감독원이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우, 그 교체를 요구할 수             있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

나. 이 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을           때에는 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자로 즉시 교체하고 감독원의 승인을           받아야 한다.

16. 과업수행시 준수사항

가. 도급자는 필수인력과 장비를 항시 확보하여야 한다.

장 비 명	규격	수량	단위	비 고
관로진단장비 또는 상관식 누수탐지기		1	대
전자식 누수탐지기		2	대
관로 탐지기		1	대
전자식청음봉 또는 단순청음봉		2	대

나. 누수탐사 사업조의 인원 구성은, 1개조에 2~3인 이상으로 한다.

다. 도급자는 과업수행중 누수탐사 블록의 변경이 필요할시 시행청의 지시에              따라 변경하여야 한다.

라. 도급자는 용역 기간 중 감독관 요구가 있을 시 중간 보고서를 제출하여야 한다.

마. 누수탐사 실적을 매월 서면 작성하여 보고한다.

바. 본 사업 추진 상 제수변 개․폐작업을 필요로 하는 경우에는 시행청에 사전            보고 후 승인을 득해야 하며, 단수로 인한 주민 불편사항을 최소화 할 수 있는           조치를 취해야 한다.

사. 수용가 청음 등으로 옥내 출입 시에는 수용가의 사전 승인을 득한 후 작업에            임할 것이며, 작업 중 도난사고 및 기타 민원이 발생하지 않도록 하고, 부주           의로 인한 제반사고에 대하여는 도급자 책임으로 한다.

아. 유수율은 우리시에 구축된 유수율 분석 프로그램을 기준으로 산정한다.

Ⅱ. 특별과업지시서

1. 일반사항

가. 기본지침

1) 계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 사업의 목적에 부합되고, 경제적이며           효율적인 기준으로 이 과업을 성실히 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 각이 과업을 수행함에 있어 관련법규에 저촉되지 않도록 하여야 한다.

3) 적용되는 모든 자재는 국제표준규격 또는 한국산업규격이나 이와 동등이상의           성능을 지닌 자재를 선정하여야 한다.

4) 계약상대자는 이 과업 수행과정에서 타 시설물에 대한 훼손 등의 피해 발생이           없도록 사전에 조치하여야 하며, 이의 소홀로 인한 책임은 계약상대자가 진다.

나. 적용기준 및 기술

1) 이 과업수행을 위한 조사, 기본설계 등은 이 과업지시서 해당조항에서 특별히           정하는 것 이외에는 다음 법령과 기준의 최신내용에 만족하도록 하여야 한다.

- 상수도시설기준(환경부)

- 상수도시설기준[유지관리편](환경부)

- 하수도시설기준(환경부)

- 미국수도협회(AWWA)에서 발행된 상수도설계관련 지침, 기준

- 일본수도협회(JWWA)에서 발행된 상수도설계관련 지침, 기준

- 유수율 제고 업무처리 규정(‘01. 2, 환경부)

- 기타 과업 및 사업수행 관련 법령

- 기타 국내․외 공신력 있는 기관으로부터 입증되어 설계에 적용된 사례 등

2) 계약상대자는 법령 또는 기준이 바뀌었을 때는 새로운 법령 또는 기준에서            정한 바에 따라야 하며, 법령 또는 기준의 내용이 서로 상이하거나 여러 방법이           제시된 경우에는 계약상대자의 의견을 제시하여야 하고 감독원과 협의하여            결정하여야 한다.

3) 이 과업을 수행하기 위한 설계 등의 기준은 상기 (1)항의 각목에 국한되는             것은 아니며, 계약상대자는 이 과업의 특성에 맞는 국내․외 최신기술을 적용           하여야 한다.

2. 과업세부내용

가. 작업준비 및 계획

1) 자료수집

(1) 생산량 및 요금부과량(최근 1년간 월별)

(2) 기존 상수도 관망도

(3) 누수사고 사례 및 원인분석 관련자료

(4) 상수도 누수민원 등 관련자료

(5) 기타 상수도 현황 자료

2) 작업준비

(1) 도면준비

(2) 전체공정에 대한 작업계획

3) 현장시설물 현황조사

(1) 계약 상대자는 수집된 자료의 신뢰성 확보와 최신 정보수집 및 현장실태             파악 등을 위하여 현황조사를 실시하여야 한다.

(2) 시설물 조사는 과업 대상구역 내의 상수도시설의 위치 파악을 위한 도상조사,             현장조사, 과거 시공실적 조사 등에 대하여 상세히 조사하여야 한다.

나. 누수탐사

1)관로노선확인

(1) 관로노선 확인은 기 제작된 관망도를 바탕으로 관로의 매설지점을 확인            하여 매설위치를 조사한다.

(2) 관로노선 확인시 관로의 노출, 지상누수 등 긴급 보수가 요구되는 사항은            즉각적으로 감독원에게 보고하여 조속 조치가 이루어지도록 해야 한다.

(3) 관로노선 확인시 기존관망도와 다른지점은 외업도에 표시하고 발주처에            보고하여 수정이 이루어지도록 한다.

2) 징후탐사

(1) 수용가 청음조사

(가) 단순 청음봉으로 계량기 청음을 통하여 옥내 및 옥외 징후를 조사한다.

(나) 옥내누수 발견시 수용가에 구두로 통보하며, 현황을 감독관에게 제출한다.        (2) 하수도 유수조사

(가) 비교적 물사용량이 적은 야간 시간대를 이용, 하수도 유수량을 조사하며              누수지역을 판단한다.

(나) 하수도 맨홀의 하수량이 비정상적으로 과도하거나, 맑은물의 지속적 유수시              또는 현재맨홀에서는 미세하나 다음 맨홀에서 하수량이 급격히 많아질 경우             시약으로 수돗물여부를 판단한다.

(다) 잔류염소 반응지역을 현장 및 도면에 표시하고 차후 정밀탐사시 집중              적으로 탐사한다.

3) 정밀탐사

(1) 상관식 누수탐사

(가) 누수혐의가 있는 관로상의 관 부속시설(소화전, 제수변, 계량기 등)에                  다지점 또는 2지점 간에 상관식 누수탐지 센서를 설치하여 누수음을                  수집한 후 각 센서들 사이 관로의 관종, 구경, 연장을 조사하고 상관식                누수탐지기에 입력하여 누수탐사를 실시한다.

(나) 상수도 관로에 따라 다지점에 대하여 탐사가 동시, 반복 탐지 데이터를                수록 할 수 있어야 하며, 마이크로프로세서에 의한 분석, 정확한 누수위치                (지점)을 찾아내는 기술을 적용하여야 한다.

(다) 상관식 누수탐사가 불가능한지역은 노면음청조사를 실시한다.

(2) 노면음청조사

(가) 하수도 유수조사 및 상관식탐사 등을 통하여 급수관로 또는 배수관로의                징후발생지역에 대하여 정밀탐사를 실시하여 누수 유무를 판단한다.

(나) 밸브류(제수밸브, 소화전, 공기밸브) 청음을 통하여 배수관로의 누수징후를 조사한다.

(다) 노선확인이 불가능한 잔존관의 누수탐사를 위해 도로노선을 따라 누수                징후를 탐사한다. (주, 야)

(라) 누수징후지점은 노면음청조사를 1m간격으로 정밀 확인조사를 실시한다.

(3) 확인조사

(가) 누수징후 지역을 정밀 탐사하여 오탐이 되지 않도록 보링 등의 방법                  으로 재확인 한다.

(나) 천공전 통신, 도시가스의 노선에 주의하여 천공한다.

(다) 누수적출 시 적출보고서를 작성하여 누수수리가 신속히 이루어 질수                  있도록 감독관에게 제시한다.

(라) 누수 수리는 발주처에서 실시하며, 계약상대자는 입회하여 감독원을                  보조하여야 한다.

4) 지하정보 수집

(1) 누수수리, 밸브수리 교체 및 신설시 현장에 입회하여 지하정보를 수집한다.

(2) 밸브위치 또는 관로의 위치의 불명확시 확인한다.

(3) 수집된 자료는 사진을 첨부하여 보고서에 수록한다.

3. 과업성과품 제출

성 과 품 명	제 출 수 량
1. 누수탐사 보고서	5 부
2. 현장조사 사진첩	1 부
3. 용역 성과품 (CD작성)	3 set

별표-1

누수지점 탐사 보고서

지 역 명				탐사일				연 번
위 치
구 경		관 종			누수부위			누수원인
《 누 수 위 치 도 》
《 누 수 현장사진 》
근경(정면)					원경(측면)