2010년 3월 설계	설계자		심사자		계장		과장		소장
2010년도 국가어항(계마, 원평항) 실시설계용역 설계서 서 해 어 업 지 도 사 무 소

목      차

1. 과 업 지 시 서

2. 예 정 공 정 표

3. 설 계 예 산 서

4. 일  위  대  가

5. 단 가 산 출 서

6. 기  계  경  비

7. 자  재  단  가

8. 노  임  단  가

9. 산  출  근  거

10. 도          면

11. 기타  참고자료

1. 과 업 지 시 서

목      차

1. 과업의 개요

1.1 과업의 목적

1.2 과업의 위치

1.3 과업의 범위

1.4 과업기간

1.5 과업내용 변경조건

2. 일반사항

2.1 과업수행의 기준

2.2 각종 기술기준의 적용

2.3 공사비산정 적용기준

2.4 제출물

2.5 참여기술자

2.6 과업지시서의 해석

2.7 과업추진에 대한 일반사항

2.8 과업수행결과에 대한 책임

2.9 국제입찰에 대비한 설계도서 작성

2.10 하도급 시행

2.11 위반행위에 대한 조치

2.12 보고사항

2.13 설계자문 및 설계의 경제성 검토

2.14 관계기관 및 관련법규 협의

2.15 과업완료후의 보완요청 등

2.16 성과품의 소유

2.17 보안대책

2.18 용역손해배상공제

2.19 기타사항

3. 과업의 세부사항

3.1 기초자료 조사 및 분석

3.2 현지조사

3.3 문화재지표조사

3.4 수치모형실험

3.5 사전재해영향성검토(개발사업)

3.6 공유수면매립 기본계획 반영요청서 작성

3.7 해역이용사전협의

4. 정비계획 및 매몰저감계획 검토

4.1 공통사항

4.2 평면배치계획 검토

4.3 기능시설 및 기타시설

5. 실시설계

5.1 공통사항

5.2 공법 및 단면검토

5.3 구조계산

5.4 세부수량 및 공사비 산출

5.5 건설계획 수립

5.6 관련 서류 및 기타자료 수집․작성

5.7 설계도서의 작성

5.8 실적공사비 작성

6. 분야별 세부수행 기준

6.1 설계기준강도

6.2 철근콘크리트 구조물

6.3 호안시설

6.4 준설 및 매립

6.5 부대시설

7. 종합 및 건의

8. 설계도서 작성방법

8.1 공통사항

8.2 설계도 작성

8.3 공사시방서 작성

9. 성과물 제출

1. 과업의 개요

1.1 과업의 목적

본 과업은 계마, 원평항의 정비계획 수립 이후 일정기간 경과에 따라 항내수역이 지속적으로 매몰되어  매몰실태에 대한 모니터링 조사를 거쳐 매몰저감계획 수립하여 그 결과에 따라 준설 및 투기장 조성 등 매몰저감 계획시설에 대한 수치모형실험 등을 통하여 평면배치계획의 적정여부 및 최적의 시설단면을 결정하여 시공에 필요한 상세 설계도서를 작성하는 등 합리적인 어항개발을 위하여 실시설계를 시행코자 함.

1.2 과업의 위치

계마항 : 전라남도 영광군 홍농읍 계마리

원평항 : 전라남도 신안군 비금면 신원리

1.3 과업의 범위

가) 기초자료조사

(1) 자연조건 조사

◦ 기상자료 조사

◦ 해상자료 조사

(2) 현지 조사

◦ 수심측량 16.1km(투기장 조성구간 미포함 : 문화재지표조사의 수중지표조사로 대체)(계마항 6.9km, 원평항 9.2km)

◦ 지형측량 241,627㎡(계마항 153,465㎡, 원평항 88,162㎡)

◦ 지반조사 및 토질시험

- 해상보링 18공(계마항 7공, 원평항 11공), 토질시험 각 1식 등

◦ 해양조사

◦ 기존시설물에 대한 안전검토 및 재료원 조사 등

(3) 입지여건 조사

(4) 어항현황 조사

(5) 관련계획 조사

나) 문화지표조사(계마항 115,250㎡, 원평항 273,050㎡)

다) 수치모형 실험

파랑(설계파), 정온도(계마항 제외), 해수유동, 퇴적 및 세굴, 오염확산(부유사확산) 등

라) 사전재해영향성 검토

마) 정비계획 및 매몰저감계획 검토

바) 실시설계

(1) 계마항

◦ 투기장호안 : 567m

◦ 친수호안 : 146m

◦ 물양장 보수․보강 : 1식

◦ 준설 : 1식

◦ 부대시설 : 1식

◦ 기타시설계획수립(기능시설, 문화.복지시설, 관광.휴게시설 등 1식)

(2) 원평항

◦ 투기장호안 : 849m

◦ 가호안 : 302m

◦ 물양장 보수․보강 : 1식

◦ 준설 : 1식

◦ 부대시설 : 1식

◦ 기타시설계획수립(기능시설, 문화.복지시설, 관광.휴게시설 등 1식)

사) 공유수면 매립기본계획 반영요청서

아) 해역이용협의서(원평항)

자) 설계도서 및 보고서 작성

(1) 실시설계 보고서 각 1식

(2) 총괄(전체분) 설계서 각 1식

(3) 1차년도 발주분 설계서(발주년도) 각 1식

1.4 과업기간

착수일로부터 12개월간으로 한다.

1.5 과업내용 변경조건

본 과업 수행중 아래사항에 해당될 경우 계약금액 범위내에서 설계변경할 수 있다

(1) 과업범위 및 과업량의 증감이 있는 경우

(2) 천재지변 기타 불가항력적인 사유로 변경이 불가피할 때

(3) 기타 발주청이 필요하다고 인정할 때

2. 일반사항

2.1 과업수행의 기준

(가) 용역과업수행은 이 과업지시서와 과업지시서상의 2.4 (2)호의 과업수행계획서에 의하여 시행하여야 한다.

(나)  수급인은 우선적으로 최신의 전문기술 지식을 활용하여야 하며, 용역성과가 발주청에 최대이익을 줄 수 있도록 과업을수행하여야 한다.

(다)  수급인은 이 과업의 수행결과에 따라 산출된 공사비가 설계누락 또는 과다계상이 되지 않도록 하여 공사시공 시

이로 인한 분쟁이 발생되지 않도록 최대한 노력하여야 한다.

(라)  수급인은 기시행된 정비계획 및 매몰저감계획 용역의 내용을 충분히 검토, 적용하도록 하여야 하며 특별한 이유없이 바꾸어서는 안된다.

2.2 각종 기술기준의 적용

(가)  정부의 제반규정과 표준시방서, 설계기준 등 객관적이고 공신력 있는 국내의 최근기준을 적용하여 시행하여야 하며, 외국의 기준 등을 이용하였을 때에는 발주청이 그 내용을 알 수 있도록 그 인용부분 및 자료출처 및 적용배경을 명확히 하여야 한다.

(나)  과업수행중 사용되는 모든 자료는 그 출처를 밝혀 객관성이 확보되도록 하여야 한다

2.3 공사비산정 적용기준

(가)  노임단가 : 용역준공 기준년도의 대한건설협회 및 엔지니어링진흥협회, 대한측량협회 등에서 조사공표한 노임(이월시는 성과품 납품 당해연도분 적용)

(나)  환율 : 용역준공 기준년도의 전신환매도율 적용(이월시는 성과품 납품 당해연도분 반영)

(다)  중기사용료 : 용역준공 기준년도의 조달청 중기사용료

(라)  자재단가 : 용역준공 기준년도 최근 조달청 가격정보지 또는 물가정보지 단가 적용

(마)  수량 및 단가산출 : 정부제정 건설공사 표준품셈에 의하여 산출, 단 실적공사비 적용대상 공종 및 단가에 대하여는 실적공사비에 의한 공사비를 산출하여 적용하며, 이에 의할 수 없을 경우는 적정단가를 발주청과 협의하여 산출

2.4 제출물

(가)  과업수행조직표

1) 수급인은 과업에 참여할 사업책임기술자 및 분야별 책임기술자․참여기술자를 담당과업수행 분야별로 구분 작성하여 용역착수후 7일이내에 책임기술자 선임계, 이력서, 자격증사본을 첨부하여 발주청에 제출하여야 한다.

2) 과업수행에 필요한 분야구분은 발주청과 협의하여야 하며 다음을 기준으로 한다.

가. 항만 및 해안분야

나. 토목구조분야

다. 토질 및 기초분야

라. 기타 도시계획, 도로, 측량, 전산분야등 본 과업수행에 필요한 분야

(나)  과업수행계획서

1) 수급인은 건설기술관리법시행규칙제13조와 관련한 별표5의 설계등 용역업자의 사업수행능력 평가기준의 1.평가기준을 참고로 수행계획, 수행방법 등에 관하여 과업수행계획서를 작성, 착수후 14일 이내에 발주청에 제출하여야 한다.

2) 과업수행계획서는 과업 단계별로 구분하여 작성하고 단계별 주요 검토사항 및 인원투입계획, 공정계획이 포함되어야 한다.

(다)  세부조사수행계획서

1) 수급인은 이 과업지시서상의 3.2 현지조사 항목의 3.2.1 공통사항에서 규정한 세부조사수행계획서를 발주청에 제출하여야 한다.  다만, 세부조사계획서는 당해 조사가 착수되기 전까지 제출하도록 한다.

2) 세부조사수행계획서는 발주청과 협의하여 작성하여야 한다.

2.5 참여기술자

(가)  사업책임기술자는 과업지시서에 명시된 업무와 계약조건을 충실히 이행하여야 하며, 모든 중요한 사항에 대하여 발주청과 협의하여야 한다.

(나)  용역에 종사하는 기술자는 과업수행계획서에 일치되게 투입되어야 한다. 단, 추가투입이나 사망, 지병, 기타사유로 교체가 불가피할 경우는 교체자의 자격 및 경력에 대하여 발주청의 사전승인을 받아야 한다.

(다)  참여기술자가 과업수행에 부적당하다고 판단되거나 태만하다고 인정될 때에는 해당자의 교체를 요구할 수 있고 수급인은 이에 응해야 하며, 이로 인한 용역과업의 지연이나 용역기간의 연장은 인정되지 않는다.

(라)  건설기술관리법 관계규정에 의거 설계용역 참여기술자의 업무내용 등을 구체적으로 보고서에 기재하여야 한다.

2.6 과업지시서의 해석

과업지시서상의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 발주청과 수급인이 의견을 달리하는 경우는 신뢰를 가지고 최대한 서로 협의하여 결정하되 협의가 되지 않을 경우는 발주청의 해석에 따르는 것으로 한다.

2.7 과업추진에 대한 일반사항

(가)  발주청이 수급인의 귀책사유로 과업수행이 지연된다고 판단하여 지시할 경우는 지시에 따라 지체없이 과업이 예정대로 추진되도록 인력, 장비 등을 추가하는등 필요한 조치를 취하여야 한다.

(나)  본 과업지시서에 누락되었더라도 과업목적을 달성하기 위하여 당연히 필요한 사항은 발주청과 협의하여 수급인의 부담으로 시행하여야 한다.

2.8 과업수행결과에 대한 책임

(가)  발주청의 협의를 거친 사항이라도 설계상의 잘못이 발견될 시에는 추가비용의 청구없이 수급인의 책임하에 수정보완하여야 한다.

(나)  용역 수행결과의 잘못으로 인하여 중대한 재난이 발생하거나 설계잘못으로 인하여 발생되는 분쟁은 수급인의 책임으로    한다.

2.9 국제입찰에 대비한 설계도서 작성

공사의 계약이 국제입찰대상일 경우에는 국제입찰에 대비하여 각종 설계도서를 작성하여야 한다.

2.10 하도급 시행

(가)  수급인이 하도급을 시행하고자 하는 경우에는 발주청과 협의하여 승인을 얻어야 하며 하도급계약내용(제4항참조)을 계약체결일로부터 3일이내에 발주청에 제출하여야 한다.  또한, 승인을 받은 하도급계약내용을 변경하고자 하는 경우에도 이와 같다.

(나)  과업을 수행함에 있어 필요한 경우 타 전문기관을 활용할 수 있으며, 이 경우 사전에 발주청의 승인을 득하여야 한다.

(다)  발주청의 승인을 얻지 않아도 되는 하도급의 범위는 다음과 같으며 이 경우에도 하도급계약내용(제4항참조)은 계약체결일로부터 3일이내에 발주청에 제출하여야 한다.

① 지반조사 및 시험

② 각종 측량조사

③ 제도 및 도면작성 등

④ 수량내역서 작성 및 견적업무

(라)  하도급의 승인요청을 하는 경우 또는 하도급계약내용 변경을 위하여 승인요청을 하는 경우에는 다음 사항을 명백히 하여야 한다.

① 계약건명

② 계약금액

③ 하도급 부분 및 내역

④ 하수급인

⑤ 계약이행기간

⑥ 하도급사유(하수급인 및 기타 하도급조건 변경시에는 변경하는 사유)

⑦ 계약서 사본(계약체결후 제출)

⑧ 기타 참고사항

(마)  수급인은 하수급인으로 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자로 선정하여야 하며 법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자만이 용역을 할 수 있는 경우에는 해당면허 또는 허가등의 자격요건을 구비한 자로 선정하여야 한다.

(바)  수급인은 하도급부분에 대하여 기성금 지출이 되었을 때에는 지체없이 하수급인에게 대금을 지급하여야 한다.

(사)  하도급에 의해 수행된 용역성과에 대해서도 발주청에 대한 책임은 수급인이 져야 한다.

2.11 위반행위에 대한 조치

(가)  다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 계약위반 행위로 간주하여 계약 해지 또는 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

① 제반지시사항을 특별한 이유없이 기한내에 이행치 않을 때

② 계약기간내에 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

③ 과업수행상 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

④ 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급 주었을 때

(나)  발주청이 계약위반 행위로 간주하여 계약해지 등의 조치를 취하고자 할 때에는 조치전에 2회이상 수급인에게 과업의 성실한 수행을 요청하여야 한다.

2.12 보고사항

(가)  공정보고

착수 개시일로부터 매월 말일 정기공정보고를 하여야 하며 보고양식은 발주청과 협의하여 정하도록 한다.

(나)  중간보고 및 최종보고

①  1회이상의 중간보고와 최종보고회를 실시하여야 하며, 보고시기 및 장소는 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.(필요한 경우 중간보고회 전에 주민설명회 실시)

②  ①항의 보고회외에 발주청이 특별히 필요하다고 판단하여 보고회의를 개최토록 지시하는 경우 수급인은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

③  수급인은 과업완료 최소 1개월 이전에 최종보고서(안)를 제출하여야 하며, 발주청에서 수정 또는 보완을 요구하는 경우 그 내용을 검토하여 수정․보완하여야 한다.

(다)  발주청에서 과업의 진행내용을 파악하기 위하여 수행된 과업내용에 대한 설명을 하도록 지시할 경우에는 수급인은 이에 따라야한다.

2.13 설계자문 및 설계의 경제성 등 검토

(가)  수급인은 필요시 설계자문을 받아야하고, 자문위원회에 참석하여 설계내용을 설명하여야 하며, 자문결과는 관련내용을 검토 보완조치하고 그 결과를 발주청에 제출하여야한다. 이 경우 자문내용에 이의가 있을 경우에는 수급인은 그 사유와 근거를 자문위원회에 제시하여 확인받아야 한다.

(나)  발주청의 승인을 얻어야 할 조치계획은 그 내용을 설계에 반영하고 발주청의 확인을 받아야 한다.

(다) 건설기술관리법에 의한 설계의 경제성 등 검토대상 사업에 해당하는 경우, 설계VE 시행과정 중 필요한 제반사항에 대하여 협조하여 원활한 평가가 이루어지도록 하여야 한다.

2.14 관계기관 및 관련법규 협의

수급인은 본 용역업무의 수행과정에서 타 기관에 사전 허가/승인/협의 등을 받아야할 사항에 대하여 해당규정 및 목록, 이행절차서를 작성하여 감독자와 협의한 후 이행하여야하며, 타 기관과의 허가/승인/협의 지연 및 관계 제반법규 불이행 등으로 인하여 과업이 지연 또는 중단되는 일이 없도록 하여야 한다.

2.15 과업완료후의 보완요청 등

과업완료후라도 이 용역(발주설계포함)에 관련된 사항에 대하여 재검토 또는 보완이 필요하여 발주청의 요청이 있을 때에는 별도의 비용 청구없이 재검토 또는 보완하여 제출하여야 한다.

2.16 성과품의 소유

수급인은 용역수행으로 인하여 발생한 각종 개발 및 조사자료와 도면, 시방서, 견적서, 입찰서류 및 원도등 일체의 성과품을 발주청의 소유로 하고 발주청의 승인없이는 제3자에게 제공하거나 이 용역외의 목적에 사용할 수 없으며 준공시 발주청에 정리 제출하여야 한다.

2.17 보안대책

(가)  본 과업을 위하여 수집된 자료 및 과업수행의 결과에 대하여 철저한 관리, 보안을 유지하여야 하며 특별히 보안유지를 위하여 중요하다고 인정되는 서류와 자료 및 결과는 이의 누설, 분실, 도난을 방지하기 위하여 보안관리책임자를 지명하여 관리토록 하여야 한다.

(나)  용역 참여인원에 대한 서약서를 발주청에 제출하고 보안교육등 보안조치를 강구토록 하며, 용역 참여인원의 변경시 과업내용의 사전유출 방지와 인수인계를 철저히 하여야 한다.

2.18.  용역손해배상 공제

(가) 건설기술관리법시행령 제37조의3제3항 및 국토해양부고시 “설계․감리 등 용역손해보험 또는 공제 업무요령” 제2009-385호(2009.06)의 규정에 의하여 수급인은 설계․감리 등 용역손해배상보험 또는 공제에 가입하고  용역을 완료하기 전까지 공제증서를 제출하여야 한다.

(나) 보험료 또는 공제료는 국토해양부고시 “설계․감리 등 용역손해보험 또는 공제 업무요령” 제2009-385호(2009.06)의 제9조에  의하여 산정하고 계약금액의 증감으로 인하여 증감된 공제가입금액은 정산하여야 한다. 다만 증감된 순계약금액이 당초  보험 또는 공제가입금액의 100분의 10이내인 경우에는 그러하지 아니한다.

2.19. 기타사항

(가)  용역보고서외에 도시계획반영등과 같이 차후 이 용역과업에 의한 공사추진시 필요로 하는 자료가 있을 경우에는 별도로 작성 제출하여야 한다.

(나)  본 용역수행에 있어 제3자의 권리대상으로 되어있는 특허권 등을 사용할 때에는 수급인은 그 권리의 사용에 관하여 일체를 책임져야 한다.

(다)  과업지시서에 의한 모든 성과품은 원고가 작성되면 발주청의 승인을 득한후 조판에 임하고 성과품의 편집, 인쇄방법등은 별도로 사전에 협의하여야 하며, 검토서, 계산서, 각 도면에는 책임기술자, 검토자, 작성자의 서명이 있어야 한다.

(라)  현지조사 및 사후 증빙자료로 이용될 내용 등 용역관련 주요사항을 사진 촬영하여 사진첩 1부를 작성, 원판(필름) 또는 CD와 함께 용역 완료시 제출하여야 한다.

(마)  수급인이 공동으로 용역과업을 수행할 때에는 과업의 효율적수행과 작업능률 향상을 위해 발주청의 요구가 있을 때에는 합동사무실을 설치하여야 하며 설치위치, 소요비용 등은 발주청과 협의한다.

3. 과업의 세부사항

3.1 기초자료 조사 및 분석

(가) 공통사항

1)  실시설계에 필요한 자연조건을 조사하되 정비계획 및 매몰저감계획 용역에서 조사된 내용 또는 계획대상어항에 대하여  관련된 적정자료가 있을 때에는 이를 이용한다.

2)  자연조건조사는 이 절의 아래 항목의 내용에 따라 정비계획 및 매몰저감계획용역 자료의 검토내용이 정리되어져야 한다.

3) 자료조사는 관계기관의 통계자료를 사용하여 신뢰도를 높이되, 관계기관의 자료와 민간의 자료가 상이할 경우 이에 대한 원인 분석과 검증을 거쳐 감독관과 협의 사용하여야 한다.

(나) 어항현황조사

1) 개   요

2) 어항시설 현황

① 기본시설에 대한 위치, 구조, 형식, 시공년도, 공사비, 피해현황 등에 대하여 구체적으로 조사한다.

② 기능시설 및 복지시설에 대한 위치, 규모, 소유자, 시공년도 등 제반사항에 대하여 조사한다.

(다) 수산현황조사

1) 수산인구 및 가구조사

2) 지방어선 및 외래어선의 척수를 구분하여 연간, 톤급별, 업종별로 구분 표시하고 성어기 또는 악천후시 최대 및 평균집결 어선수와 이에 따른 장래의 어선증감 및 이용추세를 검토 분석한다.

3) 어획량 및 어획고 조사

최근 5년간 주어종별 어획량 및 어획고를 조사하고 장래의 어획량 증가추세를 검토․분석한다.

4) 어장 및 어업권, 광업권 조사

5) 어항 구역내의 여타 이용 현황 및 문제점을 조사하여, 개선사항을 제시하고, 특히 물양장 어선이용 현황은 업종별, 지역별 특성 등을 면밀히 조사하여 기존 시설보다 추가연장 필요시 장래계획에 대한 종합적인 의견을 제시하여야한다.

6) 자치단체, 수협(어촌계) 진행사업 및 추진 사업계획을 조사 후 어항 계획에 반영하여야 한다.

7) 수산물 처리 가공시설 조사

(라) 자연조건 조사

1) 지  세 : 해당 항에 대한 천연적인 지형을 설명하고 지질에 대하여 개략적으로 기술한다.

2) 기  상 : 기상청 및 기타 공공기관에서 조사한 자료(과거 20년간)를 수집 분석한다.

① 바  람

㉠ 풍향별 발생횟수는 16방위에 대하여 분석 정리하고 전풍속에 대한 발생회수와 10m/sec 이상의 풍속에 대한 발생회수를 월별, 연별로 분류, 주풍향과 설계풍향 및 풍속지속시간 등을 조사기록한다.

㉡ 과거 해당항에 내습했던 태풍에 대하여 발생지역, 평균최대풍속, 방향지속시간 및 당시기압등을 상세히 기록한다.

㉢ 상기 자료에 대하여 관측기관, 장소 등을 명시한다.

㉣ 바람 및 태풍에 대한 자료는 확률분석을 실시하여야 하며, 분석방법은 감독관과 협의하여야 하며, 이 자료는 차후 어항에 설치될 육상기능시설의 설계자료로 사용될 수 있도록 정리되어야 한다.

② 강   우

연, 월, 일의 강우량 및 지속시간, 강도 등을 조사 기입하고 관측기관, 장소 등을 명시한다.

③ 기   온

연, 월별 최고 및 최저 평균기온을 기술하고 관측기관, 장소등을 명시한다.

④ 이상의 자료를 조사, 분석하여 연간, 월별작업가능일수 등 실시설계에 필요한 자료로 활용하여야 한다.

3) 해  상

①  계획대상 어항에서의 조위, 조류, 파랑 등을 조사․분석하여야 하며 필요시 직접 관측을 실시하여야 한다.

②  조사된 바람자료 및 기존의 관측된 파랑자료를 이용하여 설계파고 및 파향을 추정하여야 하며, 그 추정방법은 감독자와  협의하여야 한다. 또한, 계획대상 지점들의 파고, 파향, 주기 및 발생빈도를 결정하고, 굴절 및 회절에 의한 파의 변화를  검토하여야 한다.

③  기존의 인근 검조소에서 관측된 조석자료를 시공에 적용할 수 있도록 분석 정리하여야 하며 필요시 조석관측을 시행하여 이를 분석 정리하여야 한다.

④  대상수역 및 인근수역의 기존 조류자료를 수집․분석하여 대상수역의 대표적인 조류방향 및 유속을 정리하여 시설물 배치계획 및 구조물 설계에 적용하여야 한다.

⑤  심해파 및 설계파고는 적용내용을 면밀히 검토하여 적정성 여부를 확인하여야 한다.

(마) 입지 및 경제적 여건 조사

1) 인문, 사회적 여건

사회, 경제적인 직․간접 세력권 인구, 행정구역, 교통, 관광, 통신 등에 대하여 기술한다.

2) 지리적 여건

위치에 따른 좌표, 수역의 이용상태등 천연적인 조건에 따른 항의 기능, 전망 등에 대하여 기술한다.

3) 인접지역의 관련사업 현황 및 전망

어업세력권내 인구별, 업종별 산업의 현황을 분류하여 검토하고 전망을 예측한다.

4) 인접지역의 산업구조 현황

5) 수산물처리 가공시설 및 기타 각 항과 관련된 개발사업계획 등을 조사한다.

(바) 기 타 조 사

1) 각 항의 특성에 따른 계획의 특징, 성격 등을 조사 기술한다.

2) 시설계획수립 및 사업수행에 필요한 제반사항을 조사한다.

3) 공사용 재료의 조달방법, 현황 및 보상물건을 상세히 조사 기술한다.

4) 도시계획과의 관계를 조사한다.

5) 관할 행정기관의 개발계획 여부 및 각 항의 관련 개발전망을 조사한다.

6) 기타 기관 또는 단체의 개발계획을 조사한다.

7) 관할 지방자치단체 및 주민의 의견을 수렴한다.

8) 정비시설 계획에 대하여 해당지방자치단체 및 수협에서 시설할 어항시설 등을 조사하여 검토하여야 한다.

(사) 자 료 분 석

1) 수산현황, 입지 및 경제여건 등의 조사된 기본자료를 분석하여 해당항의 개발전과 개발후에 대한 항세변화를 예측하여 합리적이고 발전적인 개발 방향을 제시한다.

2) 자료분석기법에 대한 전문적인 지식이 필요할 경우에는 감독관과 협의하여 하도급으로 시행할 수 있다

3.2 현지조사

(가) 공통사항

1)  정비계획 및 매몰저감계획 용역시 조사된 내용을 검토하여 실시설계보고서에 수록하여야 하며, 실시설계에 필요한 현지조사시 이를 최대한 이용하여야 한다. 또한 조사위치와 범위, 방법, 사용장비, 조사반 구성 등 조사에 필요한 구체적인 내용을 포함한 세부조사시행계획서를 발주청에 제출하여 승인을 얻은 후 시행하여야 한다.

2)  세부조사시행계획서를 제출하여 승인을 득하여야 하는 조사는 해양조사, 수심 및 지형측량, 지반조사 및 실내시험, 문화재지표조사이며 기타 과업수행상 필요한 조사가 있어 발주청이 지시하는 경우에도 세부조사시행계획서를 제출하여야 한다.

3)  현지조사는 관련 표준시방서가 있을 경우 원칙적으로 이에 따라야 하며 세부조사시행계획서 수립시 그 내용을 반영하여야 한다.

(나)  수심측량

1) 수심측량 및 지층탐사는 정비계획 및 매몰저감계획 용역시 조사된 내용이 있을 경우에는 검토하여 이를 최대한 이용하여 경제적이고 효율적으로 실시하여야 하며 검토내용을 보고서에 수록하여야 한다.  또한 계획대상지역이나 그 인근지역에 대한 수심측량 자료가 있을 경우에는 이를 비교 활용하여야 한다.

2) 측량은 음향측심기에 의하고 측량선의 위치는 인공위성 측위보정방법(GPS)을 사용하여야 한다.

단, 측량선의 접근이 불가능한 해안 암초지대나 절벽 근접지, 간사지 등은 레드측량이나 육상측량 등의 방법으로 보완하여야 한다.

3) 수심측량은 수치모형실험, 파고추정 등을 감안 충분한 수면까지 조사하여야 한다.

4) 실시설계는 주요공법과 표준단면, 세부계획 등을 설계하기 위한 과업이므로 측심간격은 10m이내로 하되 수심측량의 목적과 구조물 설계의 중요도, 해저의 기복 및 종류, 대상구조물의 위치 및 중요성에 따라 필요시 발주청과 협의하여 축적과 측심간격을 결정 또는 변경할 수 있다.

5) 수심측량은 발주청에 제출한 세부조사시행계획서에 따라야 하며 과업의 증감이 있을때에는 감독자와 협의하여 예산의 범위내에서 정산할 수 있다.

(다) 지 형 측 량

1) 어항구역의 해안을 따라 지형측량을 실시하되 기존의 성과를 수집하여 편수한다.

2) 시설계획에 필요한 어항구역부근을 포함하여 측량한다.

3) 만조위선에서 육지부로 50M이상까지 측량을 실시하여야 한다.

4) 구조물의 설치 및 확인을 위한 기준점 표석(2개 이상)은 측량하기 쉽고 절대 훼손되지 않는 장소에 견고하게 설치하고 측량원도에 표시(육상기준점 및 해상기준점 동시표기)를 하여야 하며, 기준점 매설은 발주처 담당자 입회하에 그 위치 및 설치규격 등을 협의하여 매설한다.

① 수준점의 표석 재질은 진유원판(동판)을 사용하여야 하며, 각 수준점의 상세위치도를 작도하고 여백에 방위를 표기한다.

② 위치평면도상에 수준점을 표시하여야하며, 기본 수준면상의 표고는 m/m 단위까지 표시한다.

③ 좌표는 위,경위도 및 직각 좌표(X·Y)을 동시 표기 한다.

5) 축척은 1/1,000을 원칙으로 하나 지형의 여건을 고려하여 조정할 수 있다.

6) 지적도를 확인하여 지형도에 경계선을 표시하고, 지적부합 여부 등을 조사하여야 한다.

(라) 지반조사 및 시험

1) 시설계획에 필요한 지층의 특성파악과 구조물의 설계에 필요한 토질조건, 기공법 등을 결정하기 위하여 지반조사를 실시하여야 한다.

2) 지반조사는 발주청에 제출한 세부조사시행계획서에 따라야 하며 과업의 증감이 있을 때에는 예산범위내에서 정산을 할 수 있다.

3) 해상보링 조사위치는 발주청에서 평면도를 제시하였을 경우에는 이에 따라서 실시하여야 하며 제시된 평면도가 없을 경우에는 그 위치를 평면도에 표시하여 세부조사시행계획서 수립전 발주청과 협의후 시행하여야 한다.

4) 시추조사의 위치변경이나 시추개소의 증감이 필요한 경우에는 감독자와 사전협의 후 승인을 받아 시행하여야한다.

5) 지반조사는 토질전문기술자의 입회하에 실시하고 수시로 조사결과를 감독자에게 보고하여야 한다.

6) 조사를 실시한 위치는 평면직각 좌표로 시추조사 성과도에 표시하여야 한다.

7) 지층변화에 따른 시추심도의 변경 및 암반층의 시추심도는 구조물 기초설계에 필요한 심도 등을 고려하여 결정되어야 하므로 세부조사시행계획서에 이에 관한 내용이 포함되어야 하며 시추중에 예측치 못했던 지층이 있는 경우에는 감독자와 협의한 후 작업을 실시하여야 한다.

8) 자연시료 채취는 채취가능한 위치에 대하여 KSF 2317 규정에 의하고, 샘플은 지반상태에 가장 알맞은 것을 사용하여야 한다.

9) 표준관입시험은 2m마다 1회씩 실시하는 것을 원칙으로 하되, 토성이 변할 때마다 시료를 채취 필요한 토질시험을 실시하여야 하며, 토질 특성상 표준관입시험이 불필요하는 등 시험횟수의 조정이 필요하다고 인정될 경우에는 감독자와 협의하여 시행한다.

10) 채취된 시료에 대한 시험은 다음의 토질시험을 실시하되 공사재료원 등의 파악등 추가적인 시험은 감독자와 협의하여 시행한다.

- 함수비 시험

- 비중 시험

- 입도 및 체분석 시험

- 액성한계실험

- 소성한계실험

- 3축 압축실험

- 압밀시험등

11) 지반조사의 결과는 토질주상도, 토질단면추정도, 지지층 심도분포도, 연약층 분포도, 토질시험 결과표, 토질분류도 및 구간별 연약지반 토질정수 분석자료등으로 정리하여 토질조사보고서를 작성하여야 한다.

12) 과업수행의 목적달성을 위해서 추가적으로 시추조사를 실시하여야 하나 발주청의 예산등의 이유로 추가조사를 실시하지 못할 경우에는 이 내용을 보고서에 수록하여 시공시에 이를 참조하도록 하여야 한다.

13) 지반조사심도는 암반일 경우 연암 1m까지 시행하는 것을 원칙으로 하되 감독관과 협의 결정하여야 한다.

14) 지반조사 위치선정시 국토해양부 “지반정보통합DB시스템” 및 기존자료를 최대한 활용하여야 한다.

(마) 해양조사

1)  해양조사는 항내외의 주변의 파랑 특성을 파악하고 구조물의 마루높이 산정 및 수치모형실험의 검․보정 자료로 활용한다.

2)  파랑관측 및 분석

◦ 파랑관측은 각항의 전면해역에 2개소를 선정하여 수행한다.

◦ 관측파랑으로 분석된 파랑자료는 파랑변형실험의 입력자료로 활용한다.

◦ 메모리형 수압식파고계 또는 그 이상의 수준을 보유한 기기를 본 해역을 대표할 수 있는 적정지점에 설치하여 30일 동안 파고와 주기를 측정한다.

◦ 본 관측 자료와 기존의 파랑관측 자료를 비교․검토하여, 표사이동 및 해안선변형 실험의 기본외력을 파악토록 한다.

3)  유향 관측 및 분석

◦ 유향ㆍ유속은 기존 관측치를 분석하여 적당한 위치를 설정하며, 메모리형 전자 유속계를 현장에 거치하여 1개 정점에서 대조기, 소조기를 포함한 15일간 연속 관측한다.

◦ 관측은 중층에서 수행하며, 10분 간격으로 연속 실시한다.

◦ 유속계의 유실 등 이상여부를 항상 확인하고, 이상발생시 즉각 대처할 수 있도록 하며, 계기의 훼손 또는 고장시에 즉시 재설 또는 교체토록 한다.

◦ 유속의 일별ㆍ시간별 관측자료를 동방ㆍ북방유속성분으로 분리하여 유속ㆍ유향별 출현형태를 분석한다.

(바) 환경영향평가 협의내용 검토

수급인은 환경영향평가 및 협의내용에 따른 이행계획을 면밀히 검토하여 실시설계에 반영되도록 하여야 한다.

(사) 재료원 조사

1)  정비계획 용역에서 조사된 토취장에 대한 제반조건 및 이용여부를 검토하여 발주청과 협의후 설계 및 시공시 이용할 토취장을 선정하여야 한다.

2)  정비계획 용역시 검토된 골재원의 위치, 매장량, 골재종류 등을 검토하여 설계 및 공사시행시 이용할 골재원을 발주청과 협의후 선정하여야 한다.

3)  정비계획 용역시 검토된 계획구역 주변의 석산 위치 및 암석의 종류, 암질상태, 표토층의 두께, 품질, 가용매장량을 분석하여 설계 및 공사시행시 이용할 석산을 발주청과 협의후 선정하여야 한다.

4)  아스팔트 콘크리트 또는 레미콘이 사용될 경우는 정비계획 용역시 조사된 인근 공장 등에 대하여 검토하고 콘크리트 구조물은 발주청과 협의후 고내구성 해양콘크리트를 우선적으로 사용할 수 있도록 하고 사용결정시에는 이의 제조 및 품질확보 여건 등을 조사하여 이용 가능한 공장을 선정하여야 한다.

5)  기타 공사시행을 위하여 필요하다고 인정되거나 발주청의 지시가 있을 경우는 이에 대하여 조사하여야 한다.

(아) 용지 및 보상물 조사

1)  과업대상지구내의 용지 및 기타 보상물 현황을 조사하고 보상이 필요시에는 소요비용을 예측하고 보상조서를 작성하여야 하며 어업권 보상은 현황만 조사하고 보상 소요비용은 제외토록 한다.

2) 용지 및 보상물 조사는 감독자와 사전협의하여 시행하여야 한다.

(자) 지장물 및 지하매설물 조사

1) 계획대상지역의 지장물 및 지하매설물을 조사하여야 하며, 이설이 필요한 경우에는 이설 방안을 강구하여야 한다.

2) 조사항목은 다음과 같다.

가. 공공시설물

나. 전기 및 통신시설물

다. 가스, 송유관, 해수인입 등

라. 상하수도시설물 및 기존 구조물

마. 기타 시설물

(차) 공사용 작업장 조사

본 공사 시행을 위한 작업장(적출장,  각종 블록 제작장 등) 소요규모를 판단하고, 기 조성된 배후부지의 작업장 이용 가능여부를 조사하고 필요시 신규 작업장 조성규모를 산정하여야 한다.

(차) 어업권 현황조사

1) 과업대상지구 내의 어업권 현황을 개략적으로 조사하고 어업권 피해가 있을 경우, 어업피해범위와 그 정도를 조사하여   합리적이고 정당한 보상액 산정을 위한 기본자료를 제공함을 목적으로 하며, 조사범위는 어업피해가 발생될 수 있는   모든 해역으로 한다.

2) 보상조서 작성을 위한 기초자료 조사는 세부조사계획을 수립하여 발주청의 승인을 얻어 시행하여야 한다.

3) 어업권 보상을 위해 어업권에 대한 물건조사와 피해범위, 피해율 등 어업권에 대한 감정평가 의뢰를 위하여 필요한    보상조서를 작성하여야 한다.

3.3. 문화재지표조사

(가) 수심 및 지층탐사

1) 기준점 측량

① 해상탐사 위치측정 장비인 DGPS 기준국 설치를 위한 육상 기준점 측량은 국립지리원 삼각점을 이용하여     DGPS 기준국 설치 및 운용이 용이한 점을 선점한다.

② 삼각측량 방법 또는 광파거리측정기에 의한 다각측량 방법으로 기준점의 좌표(X,Y)를 산출한다.

2) 측심위치 결정

① 측량선의 정확한 위치측정을 위해 수심측량 전용 DGPS를 사용하여 매초 간격으로 해양조사 전문 프로그램인 HYPACK이 실시간으로 좌표를 수신한다.

② 측량선은 DGPS 위치 수신으로 사전에 컴퓨터상에 설정된 조사 계획선을 따라 항주한다.

3) 해안선 측량

① 국립지리원 삼각점을 이용, 해안선을 실측한다.

② 해안선은 원도에 표기하며 수심 및 암층도 함께 편수하여 제출한다.

4) 수심측량

① 천해용 정밀음향측심의(Hydrotrac, 주파수 200khz)를 사용하여 연속적인 측심기록을 획득한다.

② 측심간격은 25m로 실시함을 원칙으로 하되 상황에 따라 감독관과 협의하여 측량구역과 측심간격을 변경 할 수 있다.

③ 측심위치는 DGPS를 이용 정확히 실시한다.

④ 작업착수 전·후 바체크를 실시하여 음속을 보정한다.

⑤ 측심 오차 한계는 ±0.5%(수심기준) 이내로 한다.

⑥ 측심선의 진입이 곤란한 경우는 수준측량 방법에 의하여 표고를 산출한다.

⑦ 측심성과는 각종 오차를 제거하고 실내에서 최종 수심도를 작도한다.

⑧ 수심도는 당 해역의 조위를 결정, 기본수면하(약최저저조면)의 수심으로 표시한다.

5) 지층탐사

① 지층탐사는 송수파기를 측량선에 직접 부착할 수 있는 양현 직접부착식을 사용한다.

② 지층탐사기의 음파속도는 1,500m/s로 가정한다.

③ 출력주파수는 1∼9khz의 SP-Ⅲ를 사용한다.

④ 기록분석은 퇴적층내의 밀도(기록농도)차가 큰 이상 물체의 유무를 확인하고, 또한 기반암반층(고형층)도를 작성하여 설계 기초자료로서 제공한다.

⑤ 이상 기록이 나타나는 곳은 지자기 탐사기록과 대비, 통합 분석한다.

(나) 해저면 영상 조사

1) 해저지층탐사시 측량선에 Sidescan Sonar를 설치하여 해저면의 지형을 연속적으로 획득한다.

2) 105Hz를 기본주파수로 하며, 이상 물체 분포지역에서는 500Hz의 고해상 해저면 영상자료를 획득한다.

3) 수심의 기복이 심하거나 상대적으로 깊은 곳에서는 적절한 예인방식을 선택한다.

4) 조사시 갖 측점의 위치와 함께 Tow Fish의 예인거리, 항로 및 예인 각도 등을 동시에 기록하여 위치의 오차를 최소화 한다.

5) 해저기록의 선명도와 해상도가 탐사 목적에 맞는 최상의 상태를 유지하도록 하여 정밀 분석한다.

(다) 지자기 조사

1) 지자기 조사에는 정밀도가 높고 분극시간이 짧은 자력계(magneto meter)를 사용한다.

2) 정밀한 조사를 위해 자력의 영향을 최소화 할 수 있는 목선을 이용한다.

3) 해상상태가 좋은 경우 퇴적층내 매몰되는 이상 물체의 확인을 위해 가능한 센서를 최대한 해저 가까이에 투입하여 조사한다.

4) 지자기 조사를 실시, 이상 물체를 확인시 위치 등을 표시한 후 지층탐사 도면과 상호대비를 통해 이상 물체를 재확인한다.

(라) 잠수조사

각종 탐사자료(지층탐사, 해저면 영상 조사 및 지자기 조사) 성과를 분석하여 이상 물체 존재가 의심되는 지역에 대하여 잠수부를 투입, 유물의 존재 여부를 확인한다.

(마) 보고서 작성

보고서 작성은 문화재청 지표조사 처리지침에 포함하여야 할 필수 내용을 모두 기술하여야 하며, 보고서는 문화재청      심의자료로도 활용한다.

3.4. 수치모형실험

(가) 파랑변형 실험(설계파)

1)  조사자료는 정비계획 및 매몰저감계획 용역시 설계조건으로 사용되는 설계파고와 상호 비교되어야 하며, 자료가 상이할 경우 그 원인에 대한 분석이 실시되어야 한다.

2)  심해파는 장기간에 걸친 통계자료 등을 통하여 결정하되 전해역 심해설계파 추정보고서Ⅱ(’05.12, KORDI) 및 장기파랑산출 자료(구 해양수산부) 등을 참고하여 상호 비교 검토하여야 한다.

3) 모형은 지역적인 특성과 수치모형의 특징을 고려하여 적용한다.

4) 모델범위는 대상해역을 포함하여 외해조건이 성립하는 곳까지 넓게 구성한다.

5) 계산 격자망은 주관심 대상해역에 대하여 사용모형의 안정조건을 만족하고, 대상해역의 계산결과를 잘 재현하기 위해

고해상도로 구성한다.

6) 최신의 해도, 수심도 및 지형도 등을 이용하여 해안선의 위치와 격자점의 수심을 모델에 재현한다.

(나) 항내 정온도 실험

1) 광역 파랑변형 수치모형 실험은 각항의 전면의 심해역을 포함한 광역의 범위를 설정하여야 한다.

2)  상세역 파랑변형 수치모형 실험은 파의 회절, 굴절, 쇄파, 흐름간섭효과, 반사등의 영향을 고려할 수 있는 모델을 사용하여야 한다.

3)  실험영역 설정시 입사경계와 측면경계에서 급격한 파랑변형이 발생하지 않도록 주기 및 지형에 맞도록 충분히 고려하여야 한다.

4)  입사파랑의 제원은 설계파랑과 이상파랑, 평상파랑으로 구분하여 이용하여야 한다.

5) 광역 및 상세역 실험을 수행하여 가능한 격자범위 내에서 최소격자로 구성하여 실험을 수행하여야 한다.

6) 구조물 형식에 따른 반사, 투과 등을 재현 가능하도록 하여야 한다.

(다) 해수유동 및 교환율 실험

1) 해수유동실험은 대상해역의 조류특성을 파악한다

2) 해수유동모형은 당 해역과 유사한 해양특성을 갖는 지역에 적용된 바 있으며 선진기술 보유국에서 새로이 개발 또는  적용되고 있는 수치기법 및 이론의 적합성을 갖춘 2차원 연직적분 모형이나 이에 상응하는 모형을 사용하도록 한다.

3) 모형의 영역은 과업대상지역의 유동특성을 적절히 모의할 수 있는 적절한 경계로 설정하되 필요시 광역과 상세역으로  구분하도록 한다.

4) 모형의 격자망은 대상지역의 지형 및 구조물의 조건을 적절히 반영할 수 있도록 충분한 해상도를 갖는 격자로 구축한다.

5) 모형의 해안선 및 해저지형은 가장 최근의 해도, 수심도 및 지형도 등을 이용해 입력한다.

6) 실험에 필요한 제반 실험(물리)변수는 관측치 또는 이론적 방법으로 산정된 값을 부여하되 검정과정을 거쳐서 최종적으로 확정하도록 한다.

7) 실험조석조건은 대, 중, 소조기의 조류특성을 반영하기 위하여 최소한 주요 4대분조를 고려한 조건으로 한다.

8) 모형의 검증은 과업대상지의 조석 및 조류 관측치와 실험치의 비교에 의해 수행하며, 비교방법은 조위면 및 조위곡선  비교, 최강유속비교 등의 방법으로 검증한다.

9) 실험안은 현황에 대한 것과 해수소통구 설치안에 따라 설정하여 실험하도록 한다.

(라) 퇴적물이동 실험

1) 항내 및 부근해역의 퇴적물 이동에 의한 정량적 지형 변동량을 검토하고 공사 시, 공사완공후의 발생가능한 항내의 지형 변동량을 예측한다

2) 실험안별로 구간별 연간퇴적량 및 퇴적속도를 산정하며, 개발계획에 따른 인근지역의 퇴적과 침식량을 분석한다

3) 대조기, 중조기, 소조기 및 황천시를 구분하여 실험을 수행한다.

4) 구조물 근처 퇴적물의 공간적 불균등을 고려하여 3차원 퇴적물 이동, 확산 방정식을 적용하여 채택안에 대하여 침식 및 퇴적실험을 실행한다

(마) 오염확산 실험

1) 공사 시행중 발생하는 부유물질의 이동, 확산 양상을 예측, 평가하여야 한다.

2) 모델의 입력자료인 유동장(시․공간별 수위 및 유속)은 해수유동의 실험결과를 그대로 읽어 사용하여야 한다.

3) 오탁방지막의 설치에 따른 효과를 검토하되 오탁방지막의 적용 효율은 사전에 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

4) 부유사의 발생시점 및 발생강도 등은 발주청과 협의하여 결정하되 공사 단계별로 구분하여 실험하여야 한다.

5) 부유사의 확산범위는 최대 확산범위를 제시하여야 한다.

3.5. 사전재해영향성검토(개발사업)

(가) 일반사항

1) 공통사항 검토

① 기존의 지형여건 등 주변 환경에 따른 재해위험 요인 검토

② 인근지역이나 시설에 미치는 재해영향 및 예방에 관한 사항 검토

③ 대상지역내 자연재해 위험지구 등의 포함여부

④ 대상지역내 침수 위험지구 현황 및 침수 가능성 검토

⑤ 개발계획 현황 및 주변토지이용 계획과 재해예방에 관한 사항 검토여부

⑥ 대상지역내 하천 및 소하천의 포함여부

⑦ 자연재해 저감시설 현황 및 재해예방에 관한 사항

2) 입지 유형별 검토

3) 검토 체계

① 작업계획 수립 및 계획의 개요

② 사전재해영향성검토대상지역의 설정

③ 대상지역 유역 및 재해현황조사

④ 재해영향 예측

⑤ 재해영향저감대책저감대책

⑥ 결론 및 검토서 작성

(나) 세부 과업지침

1) 공통사항 검토

① 기존의 지형여건 등 주변 환경에 따른 재해위험요인 검토

- 지형여건 및 주변 환경 등에 따른 피해발생 등의 재해위험 요인을 검토하였는지 여부

② 인근지역이나 시설에 미치는 재해영향 및 예방에 관한 사항 검토

- 대상지역의 개발계획으로 인한 인근지역 및 시설물 등에 미치는 재해영향의 예방에 관한 사항을 포함하였는지 검토

③ 대상지역에 자연재해 위험지구 등의 포함 여부

- 대상지역에 재해위험 지구가 포함되는지 확인하고, 재해위험지구 개발에 대한 대책이 수립되었는지를 확인

- 필요 시 과거 재해발생 현황 등의 조사 여부

④ 대상지역내 침수 위험지구 현황 및 침수 가능성 검토

- 대상지역 침수위험 지구가 포함되는지 확인

- 인접수계의 홍수위보다 지반이 낮은 지역 및 최근에 침수피해가 발생한 지역인지 확인

- 개발계획으로 인하여 주변지역 등의 침수 가능성 검토

⑤ 개발계획 현황 및 주변 토지이용 계획과 재해예방에 관한 사항 검토여부

- 개발 예정지구 및 주변 지역의 토지이용상태, 개발계획을 확인하고 향후 개발에 따른 재해예방에 관한 사항의 포함     여부

- 관련 행정 계획상 결정된 주변 지역의 장래 토지이용 계획 내용을 검토하고, 그에 따른 재해예방에 관한 사항이      포함되었는지 여부

⑥ 대상지역내 하천 및 소하천의 포함 여부

- 대상지역내 하천 및 소하천의 포함여부 확인

- 재해를 가중시킬 수 있는 하천 복개나 유로변경 계획 등이 있는지 확인

⑦ 자연재해 저감시설 현황 및 재해 예방에 관한 사항

- 재해저감 시설의 현황조사가 되어있는지 확인

- 당해 재해저감 시설의 예방기능에 관한 사항

2) 입지 유형별 검토

① 해안․도서지역

- 상습해일 등의 피해우려지역에 대한 대처계획 검토

- 매립지의 경우 해수면 상승이 미치는 영향에 대한 검토

- 지반이 낮은 지역에서는 방류구가 낮아 조위 상승시 우수배제 가능시간이 짧아져 내수침수의 원인이 되므로 방류구의 위치변경, 유수지 설치 및 확대, 펌프 등의 기계식 배제계획, 해수역류방지시설계획 등 하수체계를 정비하는 등의 재해예방대책이 수립되었는지 검토

- 해수범람 예상 저지대는 다목적 유수지, 공원, 체육시설 등을 조성하여 조위 상승에 따른 내수배제 불량시 유수기능을 높이도록 유도

- 개발로 인한 해안선 침식, 백사장 파괴 등에 대한 검토 여부

- 신규 건축물에는 옥상 또는 지하저류시설을 설치하도록 유도

- 해안도로 주변의 국공유지를 활용하여 범람해수의 집수․저류시설을 지하에 설치하는 방안, 펌프장을 이용하여 강제 배수하도록 하는 방안 등의 방재시설물 설치계획 수립여부

- 개발대상지역은 개발로 인한 재해영향성을 충분히 검토하고 해수범람의 피해를 예방할 수 있는 부지고 상승 등의 대책을 수립한 후에 개발하도록 유도

- 연약지반 침하 등에 의한 피해 가능성에 대비하도록 검토

3) 어항 및 항만개발 분야

① 개발지역 및 해안저지대 등 주변지역의 재해취약요소를 분석하고 예방대책수립을 하였는지 여부

② 세굴 및 퇴적으로 인한 항내매몰 등 영향 분석 및 예방에 관한 사항

③ 지진해일 등에 의한 방파제 등의 재난예방대책 수립 여부

4) 기타 사전재해영향성 검토협의에 필요하다고 판단되는 사항

3.6. 공유수면매립 기본계획 반영요청서 작성

(가) 공통사항

1) 매립요청지에 대한 매립의 필요성 및 매립방법을 작성하기 위해서는 매립요청지에 대한 특성을 상세히 분석하여야 하며 특히, 매립방법은 경제성, 안정성, 시공성을 분석한 후 적합한 공법을 선정하여야 한다.

2) 요청지의 토지이용계획은 개발계획의 취지에 적합하도록 분양성 및 사업성을 고려하여 수립하여야 한다.

3) 평면계획 수립을 위한 법선계획 시 부지의 활용목적, 수리․ 수문학적 기능, 해양 환경적 측면 등을 고려한 최적의 방안을 도출하고, 매립으로 인한 영향이 최소화되도록 하여 매립기본계획 반영이 원활히 진행되도록 하여야 한다.

4) 환경 및 생태계 변화와 그 대책에 관한 조사서는 다음의 내용을 포함하여 작성하여야 하며 필요한 경우 환경영향평가용역 등에서 도출된 자료를 활용한다.

① 매립요청지의 현황

ㄱ) 주변여건 : 매립요청지의 전경사진(바다인 경우에는 만조 및 간조시의 사진을 말한다)에 매립 요청지역을 붉은  선으로 표시하고 행정구역이나 주요지형․지물 등을 예시하여 설명할 것

ㄴ) 주변현황

a) 매립요청지의 인근지역에 대한 매립면적(제곱미터)․매립목적․공사기간 및 매립지이용실태 등 공유수면  의 현황을 조사․기술할 것

b) 기타 대규모의 개발사업이 진행되고 있을 경우 에는 당해 사업의 개요를 간략히 조사․기술할 것

ㄷ) 환경관련 지구․지역의 지정현황 : 매립요청지의 인근에 위치한 환경관련 지구․지역의 지정현황과 매립 요청지와         의 거리 등 개략적인 현황을 조사․기술 할 것

② 환경․생태계의 현황

ㄱ) 매립요청지의 갯벌 또는 내륙 습지의 규모(제곱미터)

ㄴ) 생태계(인근 육상 및 해양 동․식물상)조사

a) 인근 육상 및 해양에서 관찰되는 동․식물상의 목록

- 동․식물군락의 종류

- 계절별로 출현하는 동․식물의 종류 등 군락 별 구체적인 특성

b) 매립 요청지 안의 해양생물의 종류, 서식지의 특성 등

※ 기존의 문헌 또는 현황조사에 의한 개략적인 자료를 제시할 것

ㄷ) 물리학적 환경조사 : 매립요청지의 폐쇄성의 정도, 해류 및 조류의 현황과 토사의 이동 실태, 조수간만의 차이         및 해변 암초군의 분포실태 등

ㄹ) 이화학적 환경조사

a) 매립요청지역 인근의 주요 오염원 및 오염원별 오염물질의 발생량

b) 육역․하천 및 수역 등에 대한 환경기준 및 수질 등 매립요청지의 환경상태

※ 기존의 문헌 또는 현황조사에 의한 개략적인 자료를 제시할 것

③ 매립에 따른 환경피해

ㄱ) 매립공사와 관련한 환경피해 저감대책저감대책

ㄴ) 매립 후 매립지 안의 시설물운영에 따른 환경영향 및 그 저감대책

ㄷ) 기타 환경상의 영향에 관한 저감대책

비고 : 당해 매립사업의 위치․매립목적․규모 등을 감안한 환경 및 생태계의 변화를 조사하되, 매립사업으로 인한         환경 및 생태계의 영향을 파악할 수 있도록 조사하여야 한다.

ㄹ) 요청지약의 토지이용계획과 관련된 매립 전․후의 경제성을 비교하여 수록하여야 한다.

3.7. 해역이용사전협의

(가) 환경현황 조사

해역이용협의서 작성을 위한 환경질(해양수질 및 저질), 해양동․식물 조사 등은 환경영향평가용역 등에서 조사된 자료를 해역이용사전협의를 위한 환경현황 조사 자료로 이용한다.

(나) 해양수치모형실험

해역이용협의서 작성을 위한 해양수치모형실험(해수유동 및 부유사 확산 실험)은 실시설계상의 수치모형 실험자료를 활용한다.

(다) 해역이용협의서 작성 및 협의

1) 점용 및 사용에 관한 사업계획서

2) 점용 및 사용장소의 위치 및 면적과 이를 표시한 도면(축적 5만분의 1의 해도)

3) 점용 및 사용해역과 그 인근해역의 이용상황조사서 및 도면

4) 점용 및 사용해역의 해양환경개황

5) 점용 및 사용으로 인하여 해역의 환경 및 이용에 미치게 될 영향과 대책

4. 정비계획 및 매몰저감계획 검토

4.1 공통사항

(가)  정비계획 및 매몰저감계획 용역 내용중 본 과업과 관련되어 있는 항목(표준단면, 공법, 설계파, 지반조사 내용 등)은 세부적으로 검토하여 그 적정여부를 판단하여야 한다.

(나)  정비계획 및 매몰저감계획 용역 용역에서 검토되었던 연차별 건설계획, 연차별 투자계획, 공정계획을 검토하여 그 개요와 내용을 요약하여야 한다.

(다)  공법선정의 적정성 검토

1) 정비계획 및 매몰저감계획 용역 용역에서 검토․정리된 관련 공법을 재검토하고 선정된 공법의 적정성을 경제성, 안전성, 시공성 등의 관점에서 분석하여야 하며 선정된 공법이 부적합하다고 판단할 경우에는 그 사유와 대안을 요약하여 발주청에 보고하고 발주청의 지시를 따라야 한다.

2) 정비계획 및 매몰저감계획 용역 용역에서 제시한 단면의 적정성을 검토하여 제시된 단면의 최적여부를 판단하고 그 근거를 객관적으로 제시하여야 한다.

4.2 평면배치계획 검토

(가)  어항기능구역, 관광위락기능 구역을 분리 설치하여, 상호간섭으로 인한 기능저하 및 불편함을 최소화 되도록 한다.

(나)  경제성, 이용성, 시공성을 고려하여 최적의 평면 배치 계획을 수립한다.

4.3 기능시설 및 기타시설

(가)  어촌어항법 상 기능시설의 현황을 정확히 조사하여 계획 기준년도 및 장래의 소요 시설량을 산출하여 적정 위치에 배치하고 소요시설 용지규모를 제시한다.

(나) 진입로 등 자치단체의 관련계획을 정밀 조사하여 시설계획에 포함한다.

(다) 필요시 시설계획에 친수공간 개념을 도입하여 최근 급부상하고 있는 도시민의 여가공간으로 어항이 활용될 수 있도록 한다.

5. 실시설계

5.1 공통사항

(가)  정비계획 및 매몰저감계획 용역에서 정해진 내용에 따라 실시되어야 한다.

(나)  구조물의 설계는 원칙적으로 항만 및 어항설계기준에 의하며 항만 및 어항공사 전문시방서 등을 참고로 실시하여야 한다.

(다)  구조계산 등에 컴퓨터 소프트웨어를 사용하였을 때에는 사용 소프트웨어에 대한 설명과 함께 입력 데이터, 출력내용, 제한조건 등을 상세히 수록하여야 한다.

(라)  기초구조물 설계시에는 활동(원호활동 포함), 전도, 지지력 등을 검토하여야 하며 구조계산서에는 검토과정을 알 수 있도록 상세히 수록하며 내진설계의 적용여부를 검토하여야 한다.

(마)  어항구조물에 대한 설계는 강도설계법을 사용함을 원칙으로 한다.  다만, 구조물 또는 재료의 특성상 강도설계법을 사용할 이유가 없다고 판단될 경우에는 발주청과 협의하여 허용응력설계법을 사용할 수 있다.

(바)  해양콘크리트 구조물의 내구성 향상을 위하여 고내구성 콘크리트 사용을 우선적으로 검토하여 설계하여야 한다.

(사)  비교안 작성

1) 중요 구조물의 설계는 각종 자료를 수집분석 검토하여 5개 이상의 구상안을 작성하여야 하며 그중 가장 경제적이고 내구성이 있는 안을 선정할 수 있도록 3개안 이상(합리적인 비교를 위하여 각각의 안은 그 자체로서 가장 경제적이고 안전한 최적의 안이 되어야 한다)을 선택하여 이에 대한 구조계산 및 공사비, 장단점, 기타 필요한 사항 등을 검토․작성하여 최적안을 선정하여야 한다.  다만, 구상안의 수는 공사의 규모등에 따라 발주청과 협의하여 조정할 수 있다.

2) 각각의 비교안 검토시에는 유지관리비를 포함한 경제성 분석이 이루어져야 한다.

(아)  사전 협의사항

1) 수급인은 과업진행중 다음과 같은 세부사항은 이 과업지시서의 다른 항목에 특별한 규정이 없더라도 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

가. 구조물의 위치, 형식 및 규모

나. 적용공법

다. 구조물의 표준단면(공사비를 산정을 위한 단면 포함)

라. 도로의 노선, 표고, 포장설계

마. 중요 건설자재

바. 적용할 시공법 등

2) 세부사항에 대하여 발주청과 협의를 하였더라도 하자가 발생할 시에는 수급인의 책임이 면책되는 것은 아니다.

5.2 공법 및 단면검토

(가)  수급인은 정비계획 및 매몰저감계획 용역에서 선정한 공법을 다음의 경우를 제외하고는 변경할 수 없다.

1) 공사비를 절감할 수 있는 경우

2) 실시설계를 위한 세부조사 결과 공학적인 관점에서 지반여건 등으로 인하여 정비계획 및 매몰저감계획 용역에서 정한 공법을 사용할 수 없는 경우

3) 구조물의 내구성 또는 안전성을 상당하게 증가시킬 수 있는 경우

4) 기타 특별한 사유가 있어 발주청이 동의한 경우

(나)  수급인은 정비계획 용역에서 공법선정시 언급한 공법선정의 한계성을 면밀히 검토하여야 하며 공법선정의 한계성에 대하여 명확한 해결책 또는 그에 대한 대책을 제시하여야 한다.  이를 위해서 상세한 기초자료가 필요하다면 이를 기초자료 조사시 반영하여야 하며 조사결과 공법변경이 불가피하다고 판단될 때에는 그 내용을 발주청에 보고하고 협의하여 결정해야 한다.

(다)  수급인은 시공을 위한 세부적인 구간별 단면을 결정하여야 하며 세부단면 결정시에는 과업대상지역의 토질 및 지반조건, 수심 등 시공조건을 고려하여 경제적이고 안전하며 원활한 시공이 가능하도록 결정되어야 한다.

5.3 구조계산

(가)  주요공법의 비교 검토를 위한 각 공법의 대표단면 결정시(5.1 공통사항의 제아항 관련)에는 각 단면에 대한 구조계산을 하여 최적 단면을 선정하여야 하며 이의 판단의 근거를 설명하여야 한다.

(나)  구조계산의 내용은 체계적으로 요약하여 발주청에서 쉽게 알 수 있도록 정리하여야 하며 구조계산에 사용된 설계조건, 변수 또는 패러미터(parameter) 등을 명확히 보고서에 수록하여 그 내용을 알 수 있도록 하여야 한다.

5.4 세부수량 및 공사비 산출

(가)  과업대상시설에 대한 세부적인 물공량을 산출하고 공사비를 산정 하여야 한다.

(나)  공사 착공후 물공량 산정, 설계누락 등으로 인하여 총사업비가 증가되지 않도록 수량 및 공사비를 객관적이고 합리적으로 산출하도록 최대한 노력하여야 한다.

(다)  특히 토질조사 불철저로 인한 구조물의 심도 증가 또는 구조변경 사례발생으로 공사비 증가 및 공사지연이 되지 않도록 설계하여야 한다.

5.5 건설계획 수립

(가)  연차별 건설계획 수립

이 과업지시서에 의해 수행된 공사의 연차별 건설계획을 투자우선순위 및 투자사업비 등을 고려, 발주청과 협의하여 결정하고 이를 총사업비와 공종별로 정리하여야 한다.

(나)  시공계획 수립

1) 공사시공을 위한 시공계획을 수립하되 다음의 내용이 포함되어야 하며 공정계획은 CPM기법(주공정계획법;critical path method)을 사용하여 수립하고 그 내용을 보고서에 수록하여야 한다.

가. 자재 및 장비사용계획

나. 공정계획

다. 공사 작업장 확보계획(필요시)

다. 기타 시공시 특히 필요한 사항

2) 공사기간은 CPM으로 정확하게 산정하여 차후 공사시공자가 품질확보에 지장이 없도록 하여야 한다.

(다)  지장물 및 지하매설물 이설계획

1) 계획대상지역내의 지장물 및 지하매설물 현황을 파악하고 이설 또는 보강이 필요할 시에는 이에 대책을 수립하여야 한다.

2) 지장물 및 지하매설물 현황파악과 대책은 육상과 해상지장물로 구분하여 정리하여야 한다.

(라)  안전관리 및 품질관리 계획

1) 공사 시공중에 유의하여야 할 안전관리 사항과 품질확보를 위한 품질관리 계획을 수립하여야 한다.

2) 안전관리 및 품질관리계획은 공사시방서에 그 내용이 상세히 수록되어야 한다.

(마)  시험시공

공사시행중 품질확보를 위해 시험시공이 필요한 경우에는 이에 관하여 검토하여야 하며 시험시공과 관련하여 유의하거나 관측하여야 할 사항은 공사시방서에 그 내용이 포함되어져야 한다.

5.6 관련 서류 및 기타자료 수집․작성

(가)  공사 시행전 또는 시공중에 공사와 관련하여 관계부서 협의사항이 필요한 경우에는 이에 대한 관계법규를 검토하여 자료를 수집․정리하여 제출하여야 한다.

(나)  사업비의 예산확보를 위해 필요한 기본자료를 발주청과 협의하여 작성하여야 한다.

(다)  기타 이 사업시행과 관련하여 필요한 서류가 있어 발주청이 지시할 때에는 관련 자료를 수집․정리하여야 한다.

5.7 설계도서의 작성

이 과업지시서의 「8. 설계도서 작성방법」항목을 참고한다.

5.8 실적공사비 작성

실적공사비 축적을 위해 설계서, 설계예산서 등은 정부제정 산출기준과 실적공사비 및 표준품셈규정에 따라 발주청과 협의하여 작성하여야 한다.

6. 분야별 세부수행 기준

6.1 설계기준강도

각 구조물별 설계기준강도는 항만 및 어항설계를 기준으로 하되 그 기준을 적용할 수 없는 특별한 이유가 있을 때에는 발주청과 협의하여 조정할 수 있다.

6.2  철근콘크리트 구조물

(가)  철근콘크리트 구조물의 철근배근도를 작성할 때에는 굵은골재의 최대치수를 고려하여 시공이 용이하도록 철근을 배치하여야 하며 특히 모서리 부분이나 복잡한 부분은 철근의 피복두께가 확보될 수 있도록 특히 유의하여야 한다.

(나)  철근배근이 복잡하여 시공시 품질확보에 세심한 주의를 요구하는 경우에는 이 내용을 공사시방서에 포함하여 품질확보가 가능하도록 하여야 한다.

6.3 호안시설

(가)  호안의 설계시에는 파랑, 수심, 조류, 기초지반의 토질, 지진 및 지진시의 동수압, 시공법, 매립공법들을 고려하여야 한다.

(나)  호안 천단고는 물양장 천단고와 부지계획, 월파고 등을 고려하여 적정높이로 결정하여야 하되, 발주청과 협의하여야 한다.

(다) 호안축조와 관련하여 기존 해안선 배후지역의 배수시설을 파악하고 장래 매립지내 배수에 지장이 발생하지 않도록 배수시설을 검토하여야 한다.

(라) 호안시설이 어항을 찾는 관광객의 친수공간으로 활용될 수 있는 방안을 검토하여 발주청과 협의후 설계반영하여야 한다.

6.4 준설 및 매립

(가)  준설 필요시 기상, 해상 및 지형조건과 토질조건을 충분히 파악하여 계획하여야 하며, 준설선의 능력, 토질조건 등을 고려하여 준설방법 및 준설선단을 구성하여야 한다.

(나))  매립 필요시 해상, 기상, 원지반 및 토취장의 토질조건을 사전에 충분히 파악하고 매립지의 사용목적, 사용시기, 매립지 계획지반고 등을 고려하여 가장 경제적인 매립방식을 결정하여야 한다.

6.5 부대시설

(가)  배수시설

물양장(부두) 배후지역의 침수발생 여부 검토 및 물양장 전체구역의 배수량을 산정하고 만조시에도 배수가 용이하도록 전체 배수계획을 작성하여야 한다.

(나)  포장시설

1) 포장구조는 아스팔트 콘크리트포장과 시멘트 콘크리트포장을 비교 검토하되 포장공법에 관해서는 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

2) 포장설계는 토질, 기후, 골재, 및 교통량 등의 기초자료에 의거 설계하여야 한다.

3) 표층 및 기층용의 가열아스팔트 혼합물은 용도, 교통조건, 기상조건, 지형조건, 등 제반사항을 고려하여 검토 한 후 적합한 입도의 혼합물을 결정하고 혼합물 입도선정 근거자료를 명시하여야 한다.

4) 배후부지는 부두 운영시 활용계획을 수립하여, 포장방법, 두께 등을 결정하여야 한다.

(다) 전기설비

1) 등기구 및 전주설계에는 부식방지대책이 강구되어야 하며 경제성 및 내구성을 고려하여 선정하여야한다.

2) 변전실은 기존시설과 장래시설(기타부속건물 포함) 등 항내 전지역에 소요되는 전력 등의 제반 자료를 수집한 후 이에 의거 전력, 통신, 화재경보(전기화재경보) 등에 대한 전반적인 공급방안을 검토하여 실시설계하여야 한다.

3) 정보처리시설에 필요한 기본시설을 검토하여 실시설계에 반영하여야 한다.

4) 기타 호안의 용도 및 필요에 따라 선박용 육지전원 및 육지전화시설을 검토하여 실시설계에 반영하여야 하며, 이를 수용하기 위한 시설도 검토 반영하여야 한다.

(라) 조    경

어항의 쾌적한 환경조성을 위하여 물양장, 호안시설, 배후부지에 어항기능시설 등 관련 시설의 배치에 지장이 없는 범위내에서 조경계획을 검토하고 발주청과 협의하여 실시설계에 반영되도록 하여야 한다.

(마) 어항부지 경계시설

육상부 어항구역과 사유지와의 명확한 경계설정을 위해 발주청과 협의하여 경계선에 콘크리트 말뚝 또는 울타리 등을 설치하도록 하여야한다.

7. 종합 및 건의

(가)  이 과업수행의 결과를 종합하여 요약하므로써 이 과업에 의한 과업수행결과를 쉽게 알 수 있도록 하여야 한다.

(나)  과업수행 결과 기 수립된 어항기본계획의 변경조치 등과 같이 행정적인 조치가 필요하거나 기타 공사 시행과 관련하여 특기사항 등 중요사항이 있을 때에는 그 내용을 검토하여 보고서에 수록하여야 한다.

8. 설계도서 작성방법

8.1 공통사항

(가)  용역사는 발주에 필요한 일체의 설계도서를 작성․제출하여야 하며 설계도서의 크기, 형식 등은 발주청과 협의하여 다음 사항이 포함되도록 하여야 한다.

① 설계설명서

② 공사시방서

③ 동원인원계획표

④ 예정공정표

⑤ 예산(설계)내역서

⑥ 일위대가표

⑦ 수량계산서(토적표 포함)

⑧ 단가산출기초(중기사용료 포함)

⑨ 주요자재표

⑩ 구조계산서

⑪ 설계도면

(나)  설계도서는 시공자가 쉽게 이해할 수 있도록 작성하여야 하며 공사시방서와 공사내역서, 설계도면이 상호일치되게 작성하여야 한다.

(다)  설계도서는 원칙적으로 우리부의 건설공사업무규정에 따라서 작성하도록 한다.

(라)  구조물별로 또는 동일 구조물이라 하여도 부위별로 각각 소요 콘크리트강도와 굵은골재 허용 최대치수 등을 설계도면과 공사시방서에 명기하여야 한다.

8.2 설계도 작성

(가)  설계도면은 CAD로 작성하여 CD로 제출하여야 하고 기타 국토해양부 및 우리부의 도면관리에 대한 규정이 있을 시 그 규정에 부합될 수 있도록 발주청과 협의하여 작성․납품하여야 한다.

(나)  구조물 부위중 특히 시공에 유의하여야 할 부위나 구조형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도 설계상세도를 작성하여야 하며 시공시 필요한 시공상세도면의 작성목록을 별도로 작성하여 시공시의 품질관리가 적정하게 이루어지도록 하여야 한다.

(다)  구조물의 일반도, 측면, 정면도 및 복잡한 부위에 대한 상세도를 그려야 한다.

(라)  단계별 시공을 고려하여 설계도면을 작성하여야 하며 절단부 및 이음부는 품질관리를 위해 상세도를 작성하여야 한다.

(마)  철근배근도, 철근수량표를 작성하여야 하며, 특히 단부 등에 대한 상세배근도와 철근피복두께 확보 및 정․부철근 등의 간격유지를 위한 받침 및 간격유지재의 재료 및 설치위치도, 상세도를 작성하여야 한다.

(바)  구조물 도면에 발생가능한 균열(crack)의 종류, 허용폭 등에 대하여 서술하고 균열발생시의 처리방법 등에 대하여 명시

하여야 한다.

(사)  상세도로 표시할 수 없는 주의사항(시공시 유의사항 등)에 대해서는 우선적으로 도면에 명기하고 그렇지 못할 경우에는 공사시방서의 각 절(section) 내의 4. 특기사항 또는 공사시방서의 마지막 부분(part) 특별사항 내에 필히 작성되어져야 한다.

8.3 공사시방서 작성

(가)  공사시방서는 설계도면 등에 표현될 수 없는 내용과 보충 설명하는 사항, 시공과정에서 필요한 기술적인 사항 등이 포함될 수 있도록 작성하여야 하며 시공과정에서 분쟁 또는 클레임(claim)이 발생되지 않도록 유의하여 작성하여야 한다.

(나)  공사시방서는 항만 및 어항공사 전문시방서를 기준으로 하여 작성하되 항만 및 어항공사 표준시방서 등 기타 이 공사의 시행과 관련된 표준시방서를 참고로 작성하여야 한다.

(다)  공사시방서의 항목은 설계내역서의 공종에 따라서 작성하여 쉽게 검토․이용할 수 있도록 하여야 한다.

(라)  공사시방서의 항목별 작성기준(format)은 다음과 같아야 한다.

① 일반사항

② 재료

③ 시공

④ 특기사항

(마)  이 과업에 의하여 시공되는 공사와 관련하여 공종별로 특별히 고려하여야 할 사항은 앞의 (4)항의 4 특기사항에 상세하게 각각 기술하여야 하며 개별 항목(section)에 포함시키기 어려운 경우에는 통합하여 공사시방서의 가장 뒷부분에 특별사항이라는 제목(Title)으로 그 내용을 상세히 작성하여야 한다.

(바)  이 과업에서 검토된 안전관리 및 품질관리, 기타 설계도면 작성시 도면에 표기되어질 수 없는 내용등 공사시공과 관련

하여 필요한 내용은 공사시방서에 포함되어야 한다.

9. 성과물 제출

(가)  수급인은 과업수행과정중에 생산된 각종 조사, 연구, 검토결과를 정리하여 실시설계보고서를 작성하고 별도의 요약보고서를 작성 제출하여야 한다.

(나)  실시설계 보고서에는 각종 보고서(조사보고서, 구조계산서 등 모든 보고서)에 대한 목록이 포함되도록 하여 이 과업과 관련하여 제출되는 보고서의 종류와 종류별 권수를 언제라도 알 수 있도록 하여야 한다.

(다)  수급인은 각종 설계도서를 아래와 같이 작성하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 발주청과 성과물 항목 및 수량조정 등을 협의하여 조정할 수 있다.

1)  보고서 및 부록 : 50부(요약서 포함)

2)  설계도서

가. 설계내역서 : 10부

나. 공사시방서 : 10부

다. 수량 및 단가산출서 : 10부

라. 구조계산서 : 10부

3)  각종원도 : 각 1부

가. 각 공종별  6절 축소판 도면(복사) : 10부

나. 계획평면도 및 표준단면도 : 50부

(4)  기 타

1) 지질조사 보고서 : 10부

2) 지질조사 결과시료 및 시료상자 : 1식

3) 사진첩 : 1부(원판포함)

4) CD(설계도) : 10개(보고서 및 부록, 설계도서 수록)

5) 기타 이 과업수행으로 인하여 생산되는 각종 도서 1식

6) 각 항별 조감도 3부

2. 예 정 공 정 표

▨ 예정공정표

공 종	제1월	제2월	제3월	제4월	제5월	제6월	제7월	제8월	제9월	제10월	제11월	제12월
1. 기초자료 조사
2. 수치모형실험
3. 정비계획 및 매몰저감 계획 검토
4. 실시설계
5. 성과품 작성
공 정(%)	4	7	13	13	13	10	7	8	8	8	5	4
누계공정(%)	4	11	24	37	50	60	67	75	83	91	96	100

3. 설 계 예 산 서

2010년 3월 설계	설계자		심사자		계장		과장		소장
2010년도 국가어항(계마, 원평항) 실시설계용역 설계예산서 ○ 용역개요 : 실시설계 1식 ○ 총용역비 : 일금 490,000,000원정 ○ 도 급 액 : 490,000,000원정 (부 가 세 : 44,153,964원포함) (손해배상보험료 : 4,306,393원포함)

4. 일 위 대 가 표

5. 단 가 산 출 서

6. 기 계 경 비

7. 자 재 단 가

8. 노 임 단 가

9. 산 출 근 거

10. 도        면

11. 기 타 참 고 자 료