제주항 국제여객터미널 신축공사 기본 및 실시설계용역

2010. 6.

제 주 특 별 자 치 도

(해양수산국)

Ⅰ. 용 역 과 업 지 시 서

- 용역과업지시서  목차 -

1. 과업의 개요	1

2. 일반사항	3

3. 기초자료 조사	11

4. 기본 및 실시설계	18

5. 분야별 세부수행기준	28

6. 종합 및 건의	43

7. 설계도서 작성방법	43

8. 성과물 제출	45

1. 과업의 개요

1.1 과업명 : 제주항 국제여객터미널 신축공사 기본 및 실시설계용역

1.2 과업의 목적

본 과업은 제주항 내 크루즈 선박 및 연안여객 선박이 기항함에 따라, 크루즈여객 및 연안여객의 항만이용에 편의를 도모하고 도내 관광객 및 시민들에게 해변 친수공간을 제공하여 제주특별자치도의 관광활성화정책에 부응하고자 시행하는 여객터미널 및 친수공간 조성을 위한 설계도서를 작성하는데 그목적이 있음

1.3. 과업의 대상위치

제주특별자치도 제주시 건입동 제주항 일원

1.4 과업의 범위

1) 기초자료조사

◦ 자연조건조사

- 기상자료조사

- 지형 및 공사여건조사

◦ 현지조사

- 지형측량 : 22,000㎡

- 지반조사 : 육상5공

- 용지 및 보상물

- 지장물 및 지하매설물조사

2) 기본 및 실시설계

◦ 터 미 널 : 1식

◦ 전기, 통신 시설: 1식

◦ 브릿지웨이: 1식

◦ 조경 및 부대토목시설 : 1식

3) 성과물 제출

1.5 과업 기간

◦착수일로부터 7개월로 한다.

1.6 과업시행방법

◦본 과업지시서에 의거 도급으로 시행한다.

1.7 설계변경조건

1) 과업범위 및 내용의 증․감이 있을 때

2) 지형 측량의 증․감, 지반조사의 보링공수 및 지층별 시추두께가 달라질 때

3) 기타 발주처에서 필요하다고 인정될 때

2. 일반사항

2.1 과업수행의 기준

1) 과업수행은 관계법령, 정부의 각종 규정 및 과업지시서상의 2.5 (2)호의 “과업수행계획서”에 의하여 시행하여야 한다.

2) 수급인은 우선적으로 최신의 전문기술을 활용하여야 하며, 용역성과가 발주처에 최대의 이익을 줄 수 있도록 과업을 수행하여야 한다.

3) 수급인은 이 과업의 수행결과에 따라 산출된 공사비가 설계누락 또는 과다 계상이 되지 않도록 하여 공사 시공시 이로 인한 분쟁이 발생되지 않도록 하여야 한다.

4) 설계기준은 정부의 제반규정과 표준시방서, 정부표준품셈 등 객관적이고 공신력 있는 기준자료를 광범위하게 수집․분석하고 용역수행 단계별로 필요한 기준을 일목요연하게 정리하여 감독자와 협의한 후 적용하여야 한다.

2.2 각종 기술기준의 적용

1) 정부의 제반 규정과 표준시방서, 설계기준 등 객관적이고 공신력 있는 국내의 기준을 적용하여 시행하여야 하며, 외국의 기준 등을 이용하였을 때에는 발주처가 알 수 있도록 그 인용부분 및 자료출처를 명확히 하여야 한다.

2) 과업수행 중 사용되는 모든 자료는 그 출처를 밝혀 객관성이 확보되도록 하여야 한다.

2.3 단위

조사, 계획, 분석 및 보고서 작성 등에 사용하는 단위는 SI 단위를 기준으로 한다.

2.4 공사비 산정 적용기준

1) 노임단가 : 용역준공시의 대한건설협회 및 엔지니어링진흥협회, 대한측량협회 등에서 조사․공표한 노임(이월시는 성과품 납품 당해  년도분 적용)

2) 환    율 : 용역 준공기준 해당 연도초의 전신환매도율 적용(이월시는 성과품 납품 당해  년도분 적용)

3) 중기사용 : 용역 준공기준 해당 연도의 조달청 중기사용료

4) 자재단가 : 최근 조달청 가격정보지 또는 물가정보지 단가 적용

5) 수량 및 단가산출 : 건설공사 표준품셈 및 구 해양수산부(현 국토해양부)의 적산기준 등 관련지침에 의하여 산출(이에 의할 수 없을 경우는 적정단가를 감독자와 협의하여 산출)

2.5 제출물

1) 과업수행 조직표

① 수급인은 과업에 참여할 사업 책임기술자와 분야별 책임기술자를 담당과업 분야별로 구분 작성하여 용역착수 후 7일 이내에 자격증사본을 첨부 발주처에 제출하여야 한다.

② 과업수행에 필요한 분야구분은 감독자와 협의하여야 하며 다음을 기준으로 한다.

가. 건축분야	나. 토질 및 기초분야

다. 건축구조분야	라. 전기분야

마. 조경분야 등 본 과업수행에 필요한 분야

2) 과업수행계획서

① 수급인은 건설기술 관리법시행규칙 제13조와 관련한 “별표5”의 “2. 평가기준”을 참고로 수행계획, 수행방법 등에 관하여 과업수행계획서를 작성, 착수 후 14일 이내에 발주처에 제출하여야 한다.

② 과업수행계획서는 과업 단계별로 구분하여 작성하고 단계별 주요 검토사항 및 인원투입계획, 공정계획이 포함되어야 한다.

3) 세부조사시행계획서

① 수급인은 이 과업지시서상의 “3.2 현지조사” 항목의 “3.2.1 공통사항”에서 규정한 세부조사 시행계획서를 발주처에 제출하여야 한다.  다만, 세부조사 계획서는 당해 조사가 착수되기 전까지 제출하도록 한다.

② 세부조사 시행계획서는 감독자와 협의하여 작성하여야 한다.

2.6 참여기술자

1) 건설기술 관리법 등의 관계규정에 의거 설계용역 참여기술자의 업무내용 및 실제 참여기간 등을 구체적으로 보고서에 기재하여야 한다.

2) 사업 책임기술자는 과업지시서 및 계약서에 명시된 업무와 계약조건을 충실히 이행하여야 하며, 과업수행에 대하여 감독자와 수시 협의하여야 한다.  사업 책임기술자는 건축설계에 경험이 풍부한 자로서, 본 용역의 전체 과업과 참여기술자를 관리, 지도할 수 있는 자를 선정하여야 한다.

3) 분야별 책임기술자는 특급기술자 이상으로 당해 분야에 필요한 지식과 경험을 갖추어야 한다.

4) 사업 책임기술자는 용역기간 중 분야별 책임자와 정기적으로 용역진행사항에 대하여 협의하고, 문제점 발생 시 상호 협의하여 보완하도록 하여야 한다.

5) 용역에 종사하는 기술자는 과업수행계획서와 일치되게 투입되어야 한다. 단, 추가투입이나 사망, 질병, 기타사유로 교체가 불가피할 경우는 교체자의 자격 및 경력에 대하여 발주처의 사전승인을 받아야 한다.

6) 참여기술자가 과업수행에 부적당하다고 판단되거나 태만하다고 인정될 때에는 해당자의 교체를 요구할 수 있고 수급인은 이에 응해야 하며, 이로 인한 용역과업의 지연이나 용역기간의 연장은 인정되지 않는다.

2.7 과업지시서의 해석

과업지시서상의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 발주처와 수급인이 의견을 달리하는 경우는 신뢰를 가지고 최대한 서로 협의하여 결정하되, 협의가 되지 않을 경우는 발주처의 해석에 따르는 것으로 한다.

2.8 과업추진에 대한 일반사항

1) 감독자가 수급인의 귀책사유로 과업수행이 지연된다고 판단하여 지시할 경우는 지시에 따라 지체 없이 과업이 예정대로 추진되도록 인력, 장비 등을 추가 투입하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

2) 이 과업지시서에 누락되었더라도 과업목적을 달성하기 위하여 당연히 필요한 사항은 감독자와 협의하여 수급인의 부담으로 시행하여야 한다.

2.9 과업수행결과에 대한 책임

1) 발주처의 협의를 거친 사항이라도 설계상 잘못이 발견될 시에는 추가비용 청구 없이 수급인의 책임 하에 수정 보완하여야 한다.

2) 용역수행결과의 잘못으로 인하여 중대한 재난이 발생하거나, 설계 잘못으로 발생되는 분쟁은 수급인이 책임을 져야 한다.

2.10 하도급 시행

1) 수급인이 하도급을 시행하고자 하는 경우에는 발주처와 협의하여 사전 승인을 얻어야 하며 하도급계약내용(제4항 참조)을 계약 체결일로부터 5일 이내에 발주처에 제출하여야 한다. 또한, 승인받은 하도급계약내용을 변경하고자 하는 경우에도 같다.

2) 과업을 수행함에 있어 필요한 경우 타 전문기관을 활용할 수 있으며, 이 경우 사전에 발주처의 승인을 득하여야 한다.

3) 발주처의 승인을 얻지 않아도 되는 하도급의 범위는 다음과 같으며 이 경우에도 하도급계약내용(제4항 참조)은 계약체결일로부터 5일 이내에 발주처에 제출하여야 한다.

① 지반조사 및 시험	② 각종 측량․조사

③ 제도 및 도면작성	④ 수량내역서 작성 및 견적업무 등

4) 하도급의 승인요청을 하는 경우 또는 하도급 계약내용 변경을 위하여 승인요청을 하는 경우에는 다음 사항을 명백히 하여야 한다.

① 계약건명	② 계약금액

③ 하도급 부분 및 내역	④ 하수급인

⑤ 계약이행 기간	⑥ 하도급 사유(하수급인 및 기타 하도급조건 변경 시에는 변경하는 사유)

⑦ 계약서 사본(계약체결 후 제출)	⑧ 기타 참고사항

5) 수급인은 하수급인으로 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자로 선정하여야 하며 법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자만이 용역을 할 수 있는 경우에는 해당면허 또는 허가 등의 자격요건을 구비한 자로 선정하여야 한다.

6) 수급인은 하도급부분에 대하여 기성고가 지출이 되었을 때에는 지체 없이 하수급인에게 대금을 지급하여야 한다.

7) 하도급에 의해 수행된 용역성과에 대해서도 발주처에 대한 책임은 수급인이 져야 한다.

2.11 위반행위에 대한 조치

1) 다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 계약위반 행위로 간주하여 계약해지 또는 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

① 제반 지시사항을 특별한 이유 없이 기한 내에 이행치 않을 때

② 계약기간에 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

③ 과업수행이 성실하지 못하거나 부주의로 인한 중대한 과실이 인정될 때

④ 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급 주었을 때

2) 발주처가 계약위반 행위로 간주하여 계약해지 등의 조치를 취하고자 할 때는 조치 전에 2회 이상 수급인에게 과업의 성실한 수행을 요구하여야 한다.

2.12 보고사항

1) 공정보고

착수 개시일로부터 매월 말일 정기공정보고를 하여야 하며 보고양식은 감독자와 협의하여 정하도록 한다.

2) 착수보고, 중간보고 및 최종보고

① 1회 이상의 착수, 중간 및 최종보고회를 실시하여야 하며, 보고 횟수 및 시기에 대해서는 감독자와 협의하여 결정하여야 한다.

② 수급인은 발주처에서 과업수행 내용에 대하여 문제가 있다고 판단, 재보고회를 개최토록 요구할 때에는 수급인 부담으로 이에 따라야 한다.

③ 감독자가 특별히 필요하다고 판단하여 보고회의를 개최토록 지시하는 경우 수급인은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

④ 수급인은 과업완료 최소 1개월 이전에 최종보고서(안)을 제출하여야 하며 발주처에서 수정 또는 보완을 요구하는 경우 그 내용을 검토하여 수정․보완하여야 한다.

3) 발주처에서 과업의 진행내용을 파악하기 위하여 수행된 과업내용에 대한 설명을 하도록 지시할 경우에는 수급인은 이에 따라야 한다.

2.13 건설기술심의

1) 수급인은 “제주특별자치도 건설기술심의위원회조례” 제10조 제1항에 따라 건설기술심의요청서를 과업완료 1개월 전에 제출하여 설계한 내용에 대하여 심의를 받아야 한다.(관련 법규에 따라 발주처와 협의하여 조절 가능)

2) 수급인은 “제주특별자치도 건설기술심의위원회”에 출석하여 심의 요청한 의안에 대하여 충분한 설명을 하여야 한다. 또한 심의결과 재심의(지적내용)가 있을 경우 충분한 검토 및 조치결과를 수립 발주처에 제출하여 승인을 받아야 하며, 이 경우 심의내용에 이의가 있을 경우에는 수급인은 그 사유와 근거를 제시하여야 한다.

3) 발주처의 승인을 얻어야 할 조치결과 및 계획은 그 내용을 설계에 반영하고 감독자의 확인을 받아야 한다.

2.14 관계기관 협의 및 관련법규 검토

1) 수급인은 본 용역업무 수행과정에서 타 기관에 사전 허가, 승인, 협의 등을 받아야 할 사항에 대하여 해당규정 및 목록, 이행 절차서를 작성하여 감독관과 협의한 후 발주처를 보좌하여 해당절차를 이행하여야 하며, 타 기관과의 허가, 승인, 협의 지연 및 관계 제반법규 불이행 등으로 사업이 지연 또는 중단되는 일이 없도록 하여야 한다.

2) 수급인은 본 용역 업무를 수행함에 있어 관련법에 따른 인허가 절차를 검토하여 감독관과 협의한 후 발주처를 보좌하여 해당절차를 이행하여야 한다.

2.15 과업 보완에 대한 의무이행

과업완료 후라도 용역성과에 대한 누락, 오류, 불분명 등 미비사항이 발견되어 발주처로부터 재검토․보완 요구가 있을 때에는 별도의 비용 청구 없이 재검토․보완하여 제출하여야 한다.

2.16 성과품의 소유

수급인은 용역수행으로 인하여 발생한 각종 개발 및 조사 자료와 도면, 시방서, 견적서, 입찰서류 및 원도 등 일체의 성과품을 발주처의 소유로 하고 발주처의 승인 없이는 제3자에게 제공하거나 본 용역목적 외에 사용할 수 없으며, 준공시 발주처에 정리 제출하여야 한다.

2.17 보안대책

1) 이 과업을 위하여 수집된 자료 및 과업수행의 결과에 대하여 철저한 관리 및 보안을 유지하여야 하며 특별히 보안유지를 위하여 중요하다고 인정되는 서류와 자료 및 결과는 이의 누설, 분실, 도난을 방지하기 위하여 보안 관리책임자를 지명하여 관리토록 하여야 한다.

2) 용역 참여인원에 대한 서약서를 발주처에 제출하고 사전 보안교육 등 보안조치를 강구토록 하며, 용역 참여인원의 변경시 과업내용의 사전 유출방지를 위해 인계인수를 철저히 하여야 한다.

2.18 특허권의 사용

본 용역수행에 있어 제3자의 권리대상으로 되어 있는 특허권 등을 사용할 때에는 수급인은 그 권리의 사용에 관하여 특허권 등을 보유한 자와 서면으로 협의하여 공사설계도서에 특허권 등을 사용하는데 따른 조건을 명시하고 그 비용을 설계에 반영하여야 한다.

2.19 성과품의 인쇄

과업지시서에 의한 모든 성과품은 원고가 작성되면 감독자에게 제출하여 사전 검토를 받아야 하고, 성과품의 편집, 인쇄방법 등에 대하여도 감독자와 사전 협의한 후 조판에 임하여야 하며, 검토서, 계산서, 각종 도면에는 책임기술자, 검토자, 작성자의 서명이 있어야 한다.

2.20 기타사항

1) 현지조사 및 사후 증빙자료로 이용될 내용 등 용역관련 주요사항을 사진 촬영하여 사진첩을 작성, 원판필름 또는 CD와 함께 용역 완료시 제출하여야 한다.

2) 과업수행중 수급자의 과실로 타인에게 인적․물적 재산상의 피해를 일으켰을 시에는 수급자가 일체의 책임을 져야한다.

3. 기초자료 조사

3.1 자연조건조사

3.1.1 공통사항

1) 기본 및 실시설계에 필요한 자연조건을 조사하고, 또한 기 완료된 보고서에 조사된 내용을 파악하여 관련된 적정자료가 있을 때에는 감독자와 협의하여 이용 및 반영을 해야 한다.

2) 자연조건조사는 이 절의 아래 항목의 내용에 따라 정리되어져야 한다.

3.1.2 기상자료

1) 과거 30년 이상의 기상자료를 수집, 이를 다음 사항별로 정리․분석하여 개발계획 및 이 과업의 수행에 이용하여야 한다.

① 풍향별(16방위)로 풍급별 발생빈도를 연간, 월별, 계절별로 분석․정리하고 주풍향, 설계풍향의 풍속 등을 조사하여야 한다.

② 과거 발생했던 태풍에 대하여 발생지역, 평균 최대풍속, 지속시간 및 당시의 기압 등을 조사하여야 한다.

③ 연간, 월별 강우량 및 시간강우 강도를 분석 정리하여야 한다.

④ 연간, 월별, 계절별 안개발생일수 및 농도 등을 조사․정리하여야 한다.

⑤ 연간, 월별 최고, 최저 및 평균기온을 정리하여야 한다.

2) 수급인은 조사․정리된 기상자료를 바탕으로 작업일수를 추정하되 공사기간 부족으로 부실공사가 발생되지 않도록 하여야 한다.

3.1.3 지형조사

1) 계획 대상지의 인근 지역에 대한 개략적인 지형을 조사하고 계획대상지의 지정학적인 위치와 특성 등을 파악․정리하여야 한다.

2) 계획 대상지의 항만에서의 위치와 주변시설물의 위치를 조사․정리하여야 하며, 시설물의 배치 및 구조물 설계시에 이를 이용하여야 한다.

3.1.4 공사여건 조사

1) 재료원 조사

① 토취장이 필요한 경우에는 조사된 토취장에 대한 제반조건 및 이용여부를 검토하여 감독자와 협의하여 설계 및 시공시 이용할 토취장을 선정하여야 한다.

② 골재원이 필요한 경우에는 골재원의 위치, 매장량, 골재종류 등을 검토하여 설계 및 공사 시행시 이용할 골재원을 감독자와 협의하여 선정하여야 한다.

③ 석산이 필요한 경우에는 주변의 석산 위치 및 암석의 종류, 암질상태, 표층의 두께, 품질, 가용매장량을 분석하여 설계 및 공사 시행시 이용할 석산을 감독자와 협의하여 선정하여야 한다.

④ 아스팔트 콘크리트 또는 레미콘 사용은 인근 공장 등의 현황을 조사하여 수급가능성을 검토하고, 항만구조물의 내구성 향상을 위한 특수콘크리트의 사용 결정시 이의 제조 및 품질확보 여건 등을 조사하여 이용 가능한 공장을 선정하여야 한다.

⑤ 자원재활용 측면에서 이용 가능한 자원을 조사하여 생산량, 경제성, 환경성 등을 검토하여 적용여부를 판단한다.

⑥ 기타 공사시행을 위하여 필요하다고 인정되거나 감독자의 지시가 있을 경우는 이에 대하여 조사하여야 한다.

2) 기타조사

◦ 기타 과업범위에 포함된 조사항목 및 본 용역과업 수행에 필요하다고 판단되는 각종 조사를 실시하여 본 과업에 이용하여야 한다.

3.2 현지조사

3.2.1 공통사항

1) 이 과업지시서의 “1.4 과업의 범위”에 포함되어 있거나, 과업의 목적 달성을 위해서 세부적인 조사가 필요하다고 판단되거나 또는 감독자가 필요하다고 판단하여 지시할 때에는 기본 및 실시설계를 위한 조사를 본 과업지시서의 다음의 내용에 따라 시행하고 이를 보고서에 정리하여야 한다.

2) 기 조사된 내용을 검토하여 기본 및 실시설계에 필요한 현지 조사시 이를 최대한 이용하여야 하며, 조사 위치와 범위, 방법, 사용 장비, 조사반구성 등 조사에 필요한 구체적인 내용을 포함한 세부조사 시행계획서를 발주처에 제출하여 승인을 얻은 후 시행하여야 한다.

3) 세부조사시행계획서를 제출하여 승인을 득하여야 하는 조사는 지형측량, 지반조사 및 실내시험 등이며, 기타 과업수행에 필요한 조사가 있어 감독자가 지시하는 경우에도 세부조사 시행계획서를 제출하여야 한다.

4) 현지조사는 관련 표준시방서에 따라야 하며 세부조사 시행계획서 수립시 그 내용을 반영하여야 한다.

3.2.2 지형측량

1) 지형측량은 기존에 수행된 내용을 검토하여 이를 최대한 이용하여 경제적이고 효율적으로 실시하여야 하며 검토내용을 보고서에 수록하여야 한다.

2) 측량범위는 설계 대상지역 인근 및 배후도로 일대가 나타나도록 하되, 국립지리원의 기본삼각점을 이용, 삼각측량을 실시하여 조사구역내에 필요한 수의 보조 삼각점을 설치하여야 한다.

3) 설치된 보조 삼각점을 이용하여 지형 현황측량을 실시하여야 하며 국립해양조사원 T.B.M을 조사구역의 제반 기준점에 연결하여 지형측량에 활용하여 필요시 국립지리원의 B.M과 비교하여야 하고 감독자의 지시에 따라 표석을 설치하여 멸실되지 않도록 하여야 한다.

4) 지형지물은 상세히 원도에 표시하여야 하며 현지에 노출된 지장물, 그 규격 및 표고를 기록하여 평면도에 표시하여야 한다.

5) 계획평면도 등에서 기존시설물 및 신규시설물의 위치의 곡부에 그 위치를 좌표를 명시하여야 한다.

3.2.3 지반조사 및 시험

1) 지반조사 및 시험은 기 시행 용역시 수행된 내용을 검토하여 이를 최대한 이용하여 경제적이고 효율적으로 실시하여야 하며 검토내용을 보고서에 수록하여야 한다.  또한 계획대상지역이나 그 인근지역에 대한 지반조사 자료가 있을 경우에는 이를 비교 활용하여야 한다.

2) 지반조사는 발주처에 제출한 세부조사시행계획서에 따라야 하며 과업의 증감이 있을 때에는 계약금액의 범위 내에서 정산을 할 수 있다.

3) 지반조사 위치는 발주처에서 평면도를 제시할 경우에는 이에 따라서 실시하여야 하며 제시된 평면도가 없을 경우에는 그 위치를 평면도에 표시하여 세부조사시행계획서 수립 전 발주처와 협의 후 시행하여야 한다.

4) 지반조사를 위한 시추공의 간격은 감독자와 협의하여 실시해야한다.

5) 앞의 (4)에서 시추공의 배치간격을 결정할 때에는 기 조사된 내용을 참고로 하여 기본 및 실시설계에 필요한 충분한 조사 자료를 확보할 수 있도록 하여야 한다. 또한, 시추공의 위치 및 간격은 구조물의 중요도와 적용공법, 시설의 종류 등을 감안하여 합리적으로 결정하여야 한다.

6) 시추조사의 위치변경이나 시추개소의 증감이 필요한 경우에는 감독자와 사전협의 후 발주처의 승인을 받아 시행하여야 한다.

7) 지반조사는 토질전문기술자의 입회하에 실시하고 수시로 조사결과를 감독자에게 보고하여야 한다.

8) 조사를 실시한 위치는 평면직각 좌표로 계획좌표, 실시좌표로 구분하여 표시하여야 한다.

9) 지층변화에 따른 시추심도의 변경 및 암반층의 시추심도는 구조물 기초설계에 필요한 심도 등을 고려하여 결정되어야 하므로 세부조사시행계획서에 이에 관한 내용이 포함되어야 하며 시추 중에 예측치 못했던 지층이 있는 경우에는 감독자와 협의한 후 작업을 실시하여야 한다.

10) 자연시료 채취는 채취 가능한 위치에 대하여 KSF 2317 규정에 의하고, 샘플은 지반상태에 가장 알맞은 것을 사용하여야 한다.

11) 표준관입시험은 2m마다 1회씩 실시하는 것을 원칙으로 하되, 토성이 변할 때마다 시료를 채취 필요한 토질시험을 실시하여야 하며, 토질 특성상 표준관입시험이 불필요하는 등 시험횟수의 조정이 필요하다고 인정될 경우에는 감독자와 협의하여 시행한다.

12) 채취된 시료에 대한 시험은 다음의 토질시험을 실시하되 공사재료원 등의 파악 등 추가적인 시험은 감독자와 협의하여 시행한다.

- 함수비 시험	- 비중시험	- 입도시험	- 채가름 시험

13) 특히 불교란 시료 채취가 가능한 점성토는 흐트러지지 않은 시료를 채취하여 흙의 전단강도시험과 압밀시험 등을 실시, 흙의 공학적 특성을 파악하여 구조물 기초설계에 차질이 없도록 하여야 한다.

14) 지반조사의 결과는 토질주상도, 토질단면추정도, 지지층 심도분포도, 연약층 분포도, 토질시험 결과표, 토질분류도 및 구간별 연약지반 토질정수 분석자료 등으로 정리하여 토질조사보고서를 작성하여야 한다.

15) 과업수행의 목적달성을 위해서 추가적으로 시추조사를 실시하여야 하나 발주처의 예산 등의 이유로 추가조사를 실시하지 못할 경우에는 이 내용을 보고서에 수록하여 시공 시에 이를 참조하도록 하여야 한다.

16) 지질조사의 시추 깊이는 암반층(연암)이 있는 경우 암반층을 0.5m까지 굴착하여야 한다.

17) 모든 토질시험은 한국산업 규격에 따르는 것을 원칙으로 하되, 한국산업 규격에 규정되어 있지 않은 시험은 ASTM등 외국의 상응하는 기준을 따라야 한다.

3.2.4 용지 및 보상물 조사

1) 과업대상지구내의 용지 및 기타 보상물 현황을 감독자와 협의하여 조사하고 차후 감정평가 의뢰를 위한 보상조서를 작성하여야 한다.

2) 보상 조서 작성을 위한 기초자료조사는 세부조사계획을 수립하여 발주처의 승인을 얻어 시행되어야 한다.

3.2.5 지장물 및 지하매설물 조사

1) 조사된 내용을 검토하여 지장물 및 지하매설물 이설방안을 제시하여야 한다.

2) 조사항목은 다음과 같다.

가. 공공시설물	나. 전기 및 통신시설물

다. 상하수도시설물 및 기존 구조물	라. 기타 시설물

3) 지장물의 정확한 위치를 조사하여 도상에 표기한다.

3.3 입지여건 조사

3.3.1 인문․사회현황

계획 배후지역의 인구 및 가구, 교육시설, 문화재 등을 조사하여 정리하고 배후지의 인문․사회현황이 항만개발에 미치는 영향 및 개발이 이에 미치는 영향을 분석하여야 한다.

3.3.2 산업 및 경제현황

① 계획대상항의 직접․간접 세력권의 범위, 배후지역의 산업 및 경제현황을 상세히 조사․정리하여야 한다.

② 조사된 산업 및 경제현황을 통하여 항만 개발계획과 연계․검토하여 당해지역의 산업 및 경제여건과 개발계획이 조화되도록 하여야 한다.

3.3.3 동력 및 용수현황

① 배후지역의 동력사용과 공급시설현황을 조사하여야 한다.

② 상수도와 하수도 현황을 조사․정리하여야 한다.

3.4 관련계획 검토

1) 관련계획을 이 과업과 관련하여 종합적으로 검토하여야 한다.

2) 관련계획을 상위계획(광역계획), 지역관련계획, 교통시설 관련계획으로 분리하여 종합 정리하고, 조화 있는 계획을 수립하여야 한다.

2) 계획 지구내 및 주변지구의 관련계획 또는 건설 중인 공사를 조사․정리하여야 한다.

4. 기본 및 실시설계

4.1  공통사항

1) 구조물의 설계는 원칙적으로 구 해양수산부(현 국토해양부)의 「항만 및 어항 설계기준(´05)」에 의하며 「항만 및 어항공사 전문시방서(´05)」 등을 참고로 실시하여야 한다.

2) 구조계산 등에 컴퓨터 소프트웨어를 사용하였을 때에는 사용 소프트웨어에 대한 설명과 함께 입력 데이터, 출력내용, 제한조건 등을 상세히 수록하여야 한다.

3) 기초구조물 설계시에는 활동(원호활동 포함), 전도, 지지력 등을 검토하여야 하며 구조계산서에는 검토과정을 알 수 있도록 상세히 수록하여야 한다.

4) 구조물에 대한 설계는 강도 설계법을 사용함을 원칙으로 한다.  다만, 구조물 또는 재료의 특성상 강도 설계법을 사용할 이유가 없다고 판단될 경우에는 감독관과 협의하여 허용응력 설계법을 사용할 수 있다.

5) 비교안 작성

① 중요 구조물의 설계는 각종 자료를 수집․분석 검토하여 5개 이상의 구상안을 작성하여야 하며 그중 가장 경제적이고 내구성이 있는 안을 선정할 수 있도록 3개안 이상(합리적인 비교를 위하여 각각의 안은 그 자체로서 가장 경제적이고 안전한 최적의 안이 되어야 한다)을 선택하여 이에 대한 구조계산 및 공사비, 장단점, 기타 필요한 사항 등을 검토․작성하여 1개안을 선정하여야 한다.  다만, 구상안의 수는 공사의 규모 등에 따라 감독자와 협의하여 조정할 수 있다.

② 각각의 비교안 검토시에는 유지관리비를 포함한 경제성 분석이 이루어져야 한다.

6) 사전 협의사항

① 수급인은 과업 진행중 다음과 같은 세부사항은 이 과업지시서의 다른 항목에 특별한 규정이 없더라도 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

가. 구조물의 위치, 형식 및 규모                          나. 적용공법

다. 구조물의 표준단면(공사비를 산정을 위한 단면 포함)    라. 중요 건설자재

마. 적용할 시공법등

② 세부사항에 대하여 발주처와 협의를 하였더라도 하자가 발생할 시에는 수급인이 책임을 져야 한다.

4.2 공법 및 단면 검토

1) 수급인은 과업대상시설을 경제적으로 건설하기 위하여 관련 공법에 대하여 최신 공법을 포함한 국내의 여러 공법 및 외국에서 사용 또는 개발된 최신 공법 등을 종합적으로 조사하여 그 장단점 및 시공조건, 시공사례 등을 검토․정리하여야 한다.

2) 앞의 1)항에 의거 조사․정리된 자료를 이용하여 대상시설 건설을 위한 주요공법을 발주처와 협의하여 선정하되 주요공법 선정시에는 과업대상지역의 토질 및 지반조건, 수심 등 시공조건을 고려하여야 하며 공법선정의 객관적인 근거를 명확히 제시하여야 한다.

3) 주요공법 선정시에는 이 과업지시서의 “4.1 공통사항의 6) 비교안 작성”의 관련내용에 따라 검토하여야 한다.

4) 공법선정 후 구조물의 표준단면을 결정하여야 하며 표준단면은 그 구조물 전체 단면을 대표할 수 있도록 적절하게 선정하되 구조계산에 관한 내용은 “4.3 구조계산” 항목을 따라야 한다.

5) 지반조건 등의 상이로 구간별 표준단면이 다를 경우에는 앞의 4)항에 따라 이를 검토하고 보고서에 수록하여야 한다.

6) 주요 구조물의 표준단면 또는 구간별 표준단면은 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

7) 본 건물은 국제크루즈 여객 및 연안여객을 동시에 수용해야하므로 상호 최적의 동선계획 및 평면계획을 검토 반영해야한다.

8) 본 건물은 제주항이 국제관광중심항으로 개발되고 있음을 감안하여 제주항의 랜드마크가 될 수 있도록 계획해야 한다.

9) 터미널의 규모, 형태등은 국내외 전문가의 자문 및 해외 사례등을 충분히 검토 반영하여야 한다.

4.3 구조계산

1) 주요공법의 비교 검토를 위한 각 공법의 대표단면 결정시(“4.1 공통사항”의 5) 비교안 작성 관련)에는 각 단면에 대한 구조계산을 하여 최적 단면을 선정하여야 하며 이의 판단의 근거를 설명하여야 한다.

2) 구조계산의 내용은 체계적으로 요약하여 발주처에서 쉽게 알 수 있도록 정리하여야 하며 구조계산에 사용된 설계조건, 변수 또는 패러미터(parameter) 등을 명확히 보고서에 수록하여 그 내용을 알 수 있도록 하여야 한다.

4.4 기 시설물 안전도 검토

1) 인접된 기존 시설에 대하여 안전도 검토를 실시하여 보수․보강 필요성을 검토 결정하여야 한다.

2) 기존시설물 전면 기초부에 대한 안전점검을 실시하여 시설상태를 확인하고 적절한 보수․보강방안을 제시하여야 한다.

3) 안전도 검토결과 보강의 필요성이 있을시에는 경제성을 감안하여 합리적이고 시공에 용이한 보강단면 및 시공순서를 제시하여야 한다.

4.5 세부수량 및 공사비산출

1) 과업대상시설에 대한 세부적인 물공량을 산출하고 공사비를 산정하여야 한다.

2) 공사착공 후 물공량 산정, 설계누락 등으로 인하여 총사업비가 증가되지 않도록 수량 및 공사비를 객관적이고 합리적으로 산출하도록 최대한 노력하여야 한다.

3) 특히 토질조사 불철저로 인한 구조물의 심도 증가 또는 구조변경 사례발생으로 공사비 증가 및 공사지연이 되지 않도록 설계하여야 한다.

4.6 건설계획 수립

1) 연차별 건설계획 수립

이 과업지시서에 의해 수행된 공사의 연차별 건설계획을 투자우선순위 및 투자 사업비 등을 고려, 발주처와 협의하여 결정하고 이를 총사업비와 공종별로 정리하여야 한다.

2) 시공계획 수립

① 공사시공을 위한 시공계획을 수립하되 다음의 내용이 포함되어야 하며 공정계획은 CPM기법(critical path method)과 RERT기법을 사용하여 수립하고 그 내용을 보고서에 수록하여야 한다.

가. 자재 및 장비사용계획

나. 공정계획

다. 공사 작업장 확보계획(필요시)

라. 기타 시공시 특히 필요한 사항

② 공사기간은 CPM으로 정확히 산정하여 차후에 시공자가 품질확보에 지장이 없도록 하여야 한다.

3) 지장물 및 지하매설물 이설계획

① 계획대상지역내의 지장물 및 지하매설물 현황을 파악하고 이설 또는 보강이 필요할 시에는 이에 대책을 수립하여야 한다.

② 지장물 및 지하매설물 현황파악과 대책은 육상과 해상지장물로 구분하여 정리하여야 한다.

4) 안전관리 및 품질관리 계획

① 공사 시공 중에 유의하여야 할 안전관리 사항과 품질확보를 위한 품질관리 계획을 수립하여야 한다.

② 안전관리 및 품질관리계획은 공사시방서에 그 내용이 상세히 수록되어야 한다.

4.7 관련 서류 및 기타자료 수집․작성

1) 공사 시행전 또는 시공중에 공사와 관련하여 관계부서 협의사항이 필요한 경우에는 이에 대한 관계법규를 검토하여 자료를 수집․정리하여 제출하여야 한다.

2) 사업비의 예산확보를 위해 필요한 기본자료를 감독자와 협의하여 작성하여야 한다.

3) 기타 이 사업시행과 관련하여 필요한 서류가 있어 감독자가 지시할 때에는 관련 자료를 수집․정리하여야 한다.

4.8 설계도서의 작성

이 과업지시서의 7항에 언급한 “설계도서 작성방법” 항목을 참고한다.

5. 분야별 세부수행 기준

5.1 콘크리트 설계기준강도

각 콘크리트의 구조물별 설계기준강도는 “항만 및 어항 설계기준”(‘05. 해양수산부 : 현 국토해양부)을 기준으로 하되 특별한 이유가 있을 때에는 감독자와 협의하여 조정할 수 있다.

5.2 철근콘크리트 구조물

1) 철근콘크리트 구조물의 철근배근도를 작성할 때에는 굵은 골재의 최대치수를 고려하여 시공이 용이하도록 철근을 배치하여야 하며 특히 모서리 부분이나 복잡한 부분은 철근의 피복두께가 확보될 수 있도록 특히 유의하여야 한다.

2) 철근배근이 복잡하여 시공시 품질확보에 세심한 주의를 요구하는 경우에는 관련 시방서 규정 등을 정확히 파악하여 이 내용을 공사시방서에 포함하여 품질확보 되도록 하여야 한다.

5.3 건축(크루즈 및 연안여객터미널)

5.3.1 사전조사 내용

1) 주변여건 조사

① 공사시 주변자연경관과 부합 검토 및 법률적인 제반규제사항 검토

2) 대지조건에 관한사항 : 대지의 위치, 형태 및 범위

3) 급․배수관계의 조사 : 급․배수 및 오수처리 계통

4) 전기, 통신관계조사

① 전압의 변동사항	② 비상발전 사항        ③ 전기부하량 및 계통	④ 전화관계 계통

5.3.2 세부수행기준

1) 공통사항

① 본 용역에 의하여 설계하는 모든 구조물과 시설 등은 아래와 같은 설계기준 및 시방서에 의하여 최신 공법으로서 경제적이고 현지실정에 적합한 설계이어야 한다.

∘ 건축공사 표준시방서

∘ 콘크리트 및 철근콘크리트 표준시방서

∘ 건축법 및 동시행령, 건축사법 및 동시행령, 전기기술기준령, 한전 내, 외선규정, 한국전력공사 규정, 한국전기통신공사 규정, 소방법 및 동시행령, 지방자치단체 조례

∘ 기타 정부발행 각종 시방서 및 기준

② 건물에 대한 설계는 극한강도설계법을 사용함을 원칙으로 한다.  다만, 구조물 또는 재료의 특성상 극한강도설계법을 사용할 이유가 없다고 판단될 경우에는 감독자와 협의 할 수 있다.

③ 건물 설계시 내진설계 적용 여부를 검토하여 반영하여야 한다.

④ 사전 협의사항

∘ 건물의 위치, 구조 및 규모	∘ 적용공법

∘ 건물내 평면배치, 단면	∘ 중요 건설자재	∘ 적용할 시공법 등

⑤ 전기공사 등 제법규정에 의거 분리 발주하여야 하는 공사는 실시 설계서를 유자격자에 의해 별도 작성하여야 한다.

⑥ 전기, 소방 설비용량의 산출은 부하계산 및 해당법규에 알맞게 계획 설계하여야 한다.

⑦ 급, 배수 용량은 사용인원, 사용량 등을 계산하여 작성한다.

5.3.3 기본설계

1) 설계방향

① 대지조건의 효율적인 이용	② 경제적 합리적 계획

③ 각부기능의 합리성 및 연계성 도모	④ 기능과 동선을 고려한 쾌적한 내․외부 공간조성

⑤ 에너지 절약, 환경오염방지 및 재해방지	⑥ 유지관리의 경제성, 효율성 도모

2) 건축분야

① 배치도	② 평면도	③ 입면도	④ 주단면도

3) 기계설비 분야

① 건축계획에 의한 기계설비 계획설계	⑥ 각층별 냉․난방설비 계획도	⑪ 옥, 내외 소방시설 계획도

② 장비일람표	⑦ 급배수 배관 계통도	⑫ 층별 소방시설 계획도

③ 옥외배관계획도	⑧ 층별 급배수 배관 계획도	⑬ 층별 기계설비 통합 계획도

④ 기계실 계획도	⑨ 층별 화장실 계획도	⑭ 하수 오수처리 계획도

⑤ 냉․난방설비 계통도	⑩ 층별 환기시설 계획도

4) 전기설비 분야

① 건축계획에 의한 전기설비 계획설계	③ 옥외인입배치도(전기,통신,방송)	⑤ 간선계통도(전기,통신,방송)

② 각종 기구 상세도	④ 전력결선도	⑥ 각층평면도(전기,통신,방송)

5.3.4 실시설계

1) 실시설계에 필요한 자료정리

2) 설계도서의 작성(내역서, 시방서, 공정표, 도면포함)

3) 건축 구조계산서 작성

4) 전기부하․조도․전압강하․변압기 용량계산서 작성

5) 냉, 난방 부하․각종 탱크 및 기계류 용량계산서 작성

6) 오수처리방식 및 처리조별 용량 산출계산서 등 작성

5.3.5 건축 설계

1) 부지 : 위치, 면적, 건물과의 연관성을 고려하여 제시한다.

2) 건물의 배치 : 기능성, 안정성, 미관성 및 동선 등을 종합 검토하여 효율적으로 배치한다.

3) 건물의 높이, 형태 및 외장재 등은 기존건물과 수려한 주변 환경에 조화되도록 계획한다.

4) 창문의 형태, 크기 및 채양 등은 균형과 통일성 있게 계획하되 에너지 절약 및 해수, 해풍에 대하여 검토한다.

5) 출입문의 위치, 크기 등은 입면의 전체적인 대칭 또는 비례를 고려하여 계획한다.

6) 동선은 가급적 짧게하여 서로 교차되지 않도록 계획하고 비상동선은 관계법규에 맞도록 가능한 짧게 계획한다.

7) 하중에 영향을 주는 물탱크, 기계 설치시에는 그에 따른 보강을 하도록 한다.

8) 관광중심항만의 제주도의 특성 및 상징성이 반영 될 수 있도록 구조 및 형식검토

5.3.6 기계설비 설계

1) 냉․난방 방식은 환경(대기오염배출) 기준치에 적합하고 가장 경제적인 시스템으로 선택한다.

2) 난방관의 보온, 방열기의 종류 및 배치, 트랩, 배관고정 및 구배, 응축수의 처리 등은 에너지 절약을 위한 열 손실의 방지와 기능의 합리화 측면을 검토하여 결정한다.

3) 급수주관의 인입과 고가수조를 통한 각 실에의 공급등 급수공급 계통과 급수량 및 관경의 선정 등은 사용 위치의 급수량을 산정하여 적절히 결정한다.

4) 위생기구는 절수형으로서 관리가 쉽고 견고한 제품으로 선택한다.

5) 소방시설은 소방관계법규에 해당되는 필요한 소방시설을 포함시킨다.

6) 건물내부 배수계획에 따라 정화조의 위치 등 옥외 배수계획을 하며 정화조등은 주변 환경을 해치지 않도록 위치를 결정하고, 적정한 용량의 정화조의 계획 및 설계를 실시한다.(오수정화시설 및 정화조 설치 기준에 대한 세부사항에 대하여 적합하게 할 것)

5.3.6 전기설비 설계

1) 부하설비용량은 전등, 동력, 전열 등의 부하를 종류별로 산출한다.

2) 수전설비용량(변압기용량)을 정하고 변전실 공간을 확보한다.

3) 배전방식을 결정하고 주회로의 결선도를 작성한다.

4) 변전 설비의 형식을 선정한다.

5) 염해, 유독가스 등의 발생이 적도록 설계한다.

6) 도체의 이격거리를 확보한다.

7) 피뢰기 설치시 정격전압 및 접지저항이 제반규정에 맞도록 설계한다.

8) 간선과 타 물질과의 이격거리를 확보한다.

9) 전선은 허용전류 및 전압강하를 고려하여 설계한다.

10) 조명설비는 조도계산시 작성 및 조도 기준을 작성한다.

11) 총 부하설비(전체)를 검토하여 변전실 용량을 설계한다.

12) 소방시설은 소방관계법규에 해당되는 필요한 소방시설을 포함시킨다.

13) 조명기구 및 전기기기는 에너지효율이 높은 것으로 하고, 절전형으로 선정한다.

5.3.7 건물 및 구조물의 설치위치와 규모 결정

건물 및 구조물의 설치위치와 규모 등은 종합적인 의견을 수렴하여 결정하되 추후 증축을 대비한 기초검토는 발주처와 협의를 거쳐 결정하여야 한다.

5.4 브릿지웨이

(1) 교량의 설계조건 : 교량의 등급은 보도교로 하며, 형하 공간을 충분히 고려하고, 하중은 가장 불리한 조건으로 재하 하여 설계한다.

(2) 교량형식 선정

① 교량계획 기본사항

가. 교량 구조물은 건설비가 고가이며 반영구적인 시설물이므로 다음과 같은 기본사항을 종합적으로 고려된 교량형식 3개

이상 비교 검토하여 감독원과 협의하여 선정하여야 한다.

㉮ 주변 지형과 조화를 이루며 지역미관을 고려한 조형계획을 도입

㉯ 환경 친화적인 교량 구조물 계획

㉰ 구조적 안전성 및 내구성이 확보된 교량 공법 적용

㉱ 시공성이 원활하고 합리적이며 진보적인 건설기술 도입

㉲ 소음 진동을 최소화하고 유지관리가 용이한 공법 선정

② 본 과업구간 주요 고려사항

가. 본 과업구간에서 교량구조형식 및 공법 선정 시 중점적으로 검토할 주요 사항은 다음과 같다.

㉮ 주변 지형과 조화를 이루며 지역미관을 고려한 조형계획을 도입  Land-Mark가 될 수 있는 디자인 도입 구조형식을 선정하여야 한다.

㉯ 상부구조는 보행성이 우수한 구조로 설계되도록 한다.

(3) 시공방법과 순서의 명시

① 주요 구조물에 대한 시공방법과 순서를 개략적으로 도면과 보고서에 명시한다.

(4) 내진설계

① 도로교시방서 내진 설계편에 따라 내진설계를 적용하여, 교량전체의 구조계가 내진구조가 되도록 설계하여야 한다.

(5) 가시설의 구조계산

① 교량의 구조물 시공 및 상부공 가설에 따른 가시설 등 주요가시설에 대해서는 시공단계별로 구조계산을 하여 설계에 반영토록 한다.

(6) 신축이음장치

① 교량의 신축이음장치는 내구성, 방수성, 평탄성, 시공성, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

(7) 교좌장치

① 교좌장치의 받침부는 연직 및 수평하중에 대하여 충분히 검토하여야 하고, 특히 교좌장치의 마찰계수는 시방서 규정대로 적용하며, 감소적용이 필요한 경우에는 근거를 제시하여 사전승인을 받아야 한다.

(8) 연단거리의 확보

① 교좌장치 설치부는 도로교 구조설계기준상의 연단거리 규정을 충족하여야 한다.

(9) 형하공간은 시설한계, 유지관리공간, 도로 등에 필요한 공간이 확보되도록 검토하여 설계한다.

(10) 작업여건의 고려

① 구조물은 시공장비, 작업공간, 지반지지력, 고압전선 등 장비사용에 지장을 주는 지장물, 현장운반로 등을 고려하여 운반부재의 크기 및 중량을 정하고, 이에 따라 구조물을 설계한다.

(11) 기초형식

① 기초형식은 상부와 하부에서 작용하는 하중을 견고한 지지지반에 전달하는 구조물로서 입지적 여건 및 시공성, 경제성, 안전성, 지반조건, 하중조건 등을 면밀히 검토 후 계획을 수립하여야 하며 다음과 같은 사항을 중점적으로 검토하여 하부구조 형식을 선정하도록 한다.

㉮ 작업 공간, 현장여건, 지장물 유무

㉯ 시공 장비 및 공사기간 등 시공조건

㉰ 연약지반 유무 및 측방 유동성

㉱ 상, 하부 구조형식 및 작용하중 특성

㉲ 시공 시 환경에 미치는 영향 및 조건

㉳ 수평방향 지진력에 대한 저항성

㉴ 지진 시 액상화 발생 대응성

㉵ 유사지층에서의 시공실적 및 적용성

㉶ 교량기초 시공 중 수질오염 방지대책

㉷ 시공 중 홍수 발생 시 처리대책

② 기초공법 선정

㉮ 기초공법 선정은 공사현장 주변 여건을 고려하여 시공 시 진동, 소음 등으로 인한 민원발생 소지가 있는 경우 이를 방지할 수 있는 공법을 선택하여 한다.

③ 기초의 지지력 평가 방법 및 시공 중의 평가시험 기준에 대하여 선정･제시한다.

5.5 도로 및 포장

1) 일반사항

① 노선선정은 각 안별 장단점 등을 비교 검토후 발주처와 협의하여 최적노선을 결정하고 실시설계에 착수하여야 한다.

② 구조물의 설계는 구조물의 위치, 주변상황, 기존구조물과의 간섭, 장래 연계되는 시설물 및 개발계획 등을 충분히 검토하여 결정하여야 한다.

③ 도로의 구조형식은 미관, 시공성, 안전성, 경제성 등을 고려하여 현지 여건에 맞는 설계교통량, 설계속도를 결정하여야 한다.

④ 도로의 부대시설은 교통안전 및 조형미를 고려하여 설계하여야 한다.

2) 토공설계

① 토공설계는 관련된 제구조물과의 관계를 고려하여 가급적 절․성토량이 균형을 이루도록 평면 및 종단선형을 계획하여야 하며, 횡단구성 요소로서의 절․성토법면 경사는 토질조사 결과 및 제반자료에 의거, 안전성 및 경제성을 고려하여 결정하여야 한다.

② 노상의 지지력이 부족하다고 판단될 경우 양질토를 사용한 치환 등의 지지력 보강공법 및 연약지반처리, 노상안정처리공법 등의 대책을 수립하여야 한다.

3) 횡단구조물 및 배수시설의 설계

① 횡단구조물 및 배수시설물의 설계는 수로 및 유수의 방향과 계획도로의 토공 및 구조물과 연계하여 필요한 개소에는 배수시설을 설치하도록 설계하여야 한다.

② 구조물별 설계빈도의 기준은, 암거 및 배수관 25년, 측구는 5년, 노면배수는 10년의 강우강도를 기준으로 한다.

③ 수로 및 유수의 방향을 표시하고 배수유역도를 작성하여 현지조사를 통하여 배수구조물의 위치선정을 최종 결정하여야 한다.

4) 포장설계

① 포장구조는 아스팔트 콘크리트포장과 시멘트 콘크리트포장을 비교 검토하되 포장공법에 관해서는 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

② 포장설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량 등의 기초자료에 의거 설계하여야 한다.

③ 표층 및 기층용의 가열아스팔트 혼합물은 용도, 교통조건, 기상조건, 지형조건 등 제반사항을 고려하여 검토한 후 적합한 입도의 혼합물을 결정하고 혼합물 입도선정 근거자료를 명시하여야 한다.

5.6 조경

5.6.1 설계기준

관계법령 및 관할 지자체 조례, 정부제정 각종 시방서 및 설계기준, 규정, 지침 등을 준수하여 설계하여야 하며, 인․허가에 문제가 없어야 한다.

1) 건축법

2) 주차장법

3) 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

4) 관할 지자체 건축조례

5) 조경기준(건설교통부 고시)

6) 한국산업규격

7) 기타

5.6.2 설계방향

1) 조경계획은 주변환경과 조화를 이루는 환경친화적이며, 건축물의 특성을 부각시킬 수 있도록 계획한다.

2) 경관적, 생태적, 이용행태적 측면을 고려한 쾌적한 환경계획을 수립한다.

3) 시각적 즐거움과 휴게공간 제공 및 공간의 특성화 계획수립으로 다양한 활동형태를 수용할 수 있는 조경이 되도록 계획한다.

4) 건물과 녹지의 유기적인 관계가 유지되도록 외부공간과 내부공간이 연계된 조경 계획을 수립한다.

5) 식재수종의 선정 및 배식, 조경시설물 등은 상호 조화되어야 하며 각 시설물은 각 공간별 주안점을 유지할 수 있는 디자인 요소를 갖추어야 한다.

6) 터미널 주변과 크루즈 부두 배면 부지를 연계하여 조경 계획을 검토하여야 한다.

5.6.3 세부수행 기준

1) 조경공간계획

① 공개공지

∘ 관할 지자체의 건축조례, 도시관리계획 등을 준수하여 공개공지를 조성하여야 한다.

∘ 공개공지는 보행자, 근무자, 장애인의 접근이 쉬워야 하며, 적절한 휴게시설을 설치하여 이용자의 편의를 제공할 수 있도록 계획하여야 한다.

∘ 벤치, 파고라, 플랜터, 휴지통 등을 계획하여야 하며, 필요시 수경시설을 반영할 수 있다.

② 옥상조경

∘ 이용자의 휴식 등을 위하여 적절한 식재 및 조경시설물을 설치하되 관계규정을 준수하여야 한다.

∘ 필요시 이용자의 안전을 고려한 안전시설물을 계획하여야 한다.

∘ 야간 이용자가 있는 건축물에 대하여는 옥상조경에 야간 조명계획을 고려할 수 있다.

∘ 수목의 생장을 고려하여 인공토양, 토심, 하중, 배수, 방수 등을 계획하여야 한다.

∘ 식재관리를 위하여 스프링클러 또는 점적관수 장치를 계획하여야 한다.

③ 보행자 전용도로

∘ 건물의 기능과 접근성 등을 고려하여 합리적이고 편리한 동선으로 계획하여야 한다.

∘ 인접건물과 기능적, 시각적으로 상충되지 않아야 하며, 자연스러운 보행성이 확보되어야 한다.

∘ 통행에 지장이 없는 범위 내에서 이용자 편의를 위한 휴게시설 및 편의시설을 적절히 계획할 수 있다.

④ 기타 옥외공간

∘ 옥외공간은 다양한 이용성을 고려하여 그 위치 및 규모를 계획하고, 그 기능에 맞는 포장재로 적용하여야 한다.

∘ 옥외공간 중에서 중차량이 운행되는 부분의 포장재는 특별히 내구성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 적합하도록 하여야 한다.

2) 조경식재 계획

① 식재기준

∘ 식재 규격 및 수량은 대상지 법적기준을 준용하여 적용토록 한다.

∘ 대상지내 건물의 위치에 따른 음영분석을 실시하여야 하며, 음영분석에 의거 수종 선정과 배식이 되어야 한다.

∘ 식재설계는 토양환경과 기후에 적합하도록 하고, 배식은 수목간의 상호작용을 고려하여 계획한다.

∘ 공간별로 이용형태와 기능에 적합한 식재패턴을 도입하고, 경관적인 측면을 고려하여 수종을 선정한다.

∘ 계절적 변화감과 시각적 효과(색채)를 감안한 식재계획을 고려한다.

∘ 시각적 주요지점에는 대형목, 하부에는 화목류의 요점식재로 공간의 인지성이 강조되도록 한다.

∘ 수목의 기능적, 미적, 생태적 특성을 감안하여 각 공간별 특성을 부여한다.

② 수종선정 및 배식

∘ 시(군)목․시(군)화를 적극 반영하고, 관할지자체의 권장수목과 기피수종 등을 고려하여야 한다.

∘ 지역 환경에 적합한 향토수종과 야생초화류, 꽃․열매․단풍 등 계절적 변화감을 보고 느낄 수 있는 수종으로 선정하여야 한다.

∘ 구입가능 여부 및 시공성, 경관성, 유지관리 등을 고려하여야 한다.

∘ 각 주요공간의 특성을 부여하기 위하여 수목자체의 개성이 중시되는 교목류를 선정하여야 한다.

∘ 부지내의 조경의 계절적 변화감과 시각적 효과를 증진시킬 수 있는 교목, 관목류를 선정하여야 한다.

∘ 조경공간의 식재 기반형성을 담당할 수 있는 관목류, 초화류를 선정한다.

∘ 상록수와 낙엽수를 조화롭게 식재하여야 한다.

∘ 지역특성에 적합한 유실수의 반영을 권장한다.

③ 식재기반

∘ 식재기반은 수목생육에 적합한 토양, 토심 등을 유지하고, 불량토양의 경우 수목생육에 적합하도록 토양 조성방안을 구체적으로 제시하여야 한다.

∘ 토양의 비산이나 유실에 대한 대책과 식물의 뿌리가 방수층을 손상할 가능성에 대한 대책 및 배․관수시설에 대한 점검시스템을 구체적으로 제시한다.

∘ 인공식재기반을 녹지공간으로 할 때의 식재기반조성은 건설교통부(현 국토해양부) 제정 표준 시방서의 관련기준 이상으로 하되, 인공식재기반의 유효식재 토심은 장기적으로 수목의 생장을 고려한 토심을 확보하여야 하며, 수목의 성상별 기준에 적합하도록 계획한다.

∘ 인공식재기반에 대한 설계도서에는 수목의 생육에 적합한 배․관수시설, 토양(종류․토심), 플랜터 등의 평․단면도 등이 반드시 포함되어야 하며, 필요할 경우 배수시설이나 관수시설, 플랜터, 등 관련 공종 간 시공한계를 명시하여야 한다.

3) 조경시설물 계획

① 휴게시설

∘ 시설물의 효율성을 감안하여 적절히 배치하여야 하며, 한국산업규격 제품의 사용을 원칙으로 한다.

∘ 시설물은 건축물 디자인 및 주변환경, 전체적인 조경계획과 조화될 수 있도록 지안과 색상 등을 고려하여야 한다.

∘ 플랜터, 벤치, 파고라, 휴지통 등을 적절히 계획하여야 하며, 필요시 분수대등 수경시설을 고려할하여야 한다.

② 경관조명시설

공개공기, 옥상조경, 보행자 전용도로 등에 조명시설을 계획할 수 있으며, 조경공간의 기능에 맞게 조명의 밝기, 조명의 형태 등을 계획하여야 한다.

③ 포장계획

∘ 광장, 보도 등 포장구간은 주변 식생과 어우러질 수 있는 재질, 문양 등을 특성화하고, 녹지와 연계한 지역은 투수성 포장재료 또는 이중바닥공법 등의 투수공법을 도입하여 환경친화적인 포장설계가 될 수 있도록 한다.

∘ 장애인의 편의를 위하여 점자블럭의 설치 및 경계석 턱낮춤 등을 계획하여야 한다.

∘ 광장 등 넓은 공간의 포장지역은 집중호우 등의 악천후에도 배수에 지장이 없도록 하여야 하며, 특히 강우에 의한 지표수의 흐름이 보행에 불편을 주지 않도록 계획하여야 한다.

∘ 보행공간은 보행감이 우수한 재료의 사용을 권장한다.

4) 기타 부대시설

① 부속시설물은 전체적인 연계성을 갖고 건물과 조화될 수 있는 디자인으로 계획되어야 한다.

② 부속시설물의 효율성을 감안하여 적절히 배치되도록 계획하여야 한다.

5.7 부대시설

1) 급배수시설

① 터미널 지역의 침수발생여부 검토 및 전체구역의 배수량을 산정하고 배수방향과 배수 종말 계획고 등이 만조시에도 배수가 용이하도록 전체배수계획을 작성하여야 한다.

② 급수는 터미널시설을 고려하여 소방용수 및 생활용수 등을 해당 법규에 알맞게 계획하여야 하며, 차후 추가용량 등을 고려한 관망으로 설계하여야 한다.

2) 주차장 포장

① 주차장은 관광객과 터미널 이용자를 대상으로 한 이용차량을 고려하여 소요면적, 포장방법, 두께 등을 결정하여야 한다.

② 주차장은 연안여객 및 국제크루즈 여객의 불편이 최소화되도록 공원배치계획 등을 감안하여 계획 하여야 한다

3) 전기설비

① 부두내 조명은 선박접안 및 야간 이용이 가능하도록 설계하여야 한다.

② 등기구 및 전주설계에는 부식방지 대책이 강구되어야 하며 경제성 및 내구성을 고려하여 선정하여야 한다.

③ 변전실은 터미널, 부두시설 및 사업부지내 전지역에 소요되는 전력 등의 제반자료를 수집한 후이에 의거 전력, 통신, 화재경보(전기화재 경보) 등에 대한 전반적인 공급방안을 검토하여 실시설계를 하여야 한다.

④ 정보처리시설에 필요한 기본시설을 검토, 실시설계에 반영하여야 한다.

⑤ 기타 부두의 용도 및 필요에 따라 선박용 육지전원 및 육지 전화시설을 검토하여 실시설계에 반영하여야 하며, 이를 수용하기 위한 검토 반영하여야 한다.

6. 종합 및 건의

1) 과업수행결과를 쉽게 알 수 있도록 과업수행의 결과를 종합하여 요약하여야 한다.

2) 과업수행결과 기수립된 어항기본계획의 변경조치 등과 같이 행정적인 조치가 필요하거나 기타 공사시행과 관련하여 특기사항 등 중요사항이 있을 때에는 그 내용을 검토하여 보고서에 수록하여야 한다.

7. 설계도서 작성방법

7.1 공통사항

1) 수급인은 발주에 필요한 일체의 설계도서를 작성․제출하여야 하며 설계도서의 크기, 형식 등은 감독자와 협의하여 다음 사항이 포함되도록 하여야 한다.

① 설계설명서	② 공사시방서	③ 동원인원계획표

④ 예정공정표	⑤ 예산(설계)내역서	⑥ 일위대가표

⑦ 수량계산서(토적표 포함)	⑧ 단가산출기초(중기사용료 포함)	⑨ 주요 자재표

⑩ 구조계산서	⑪ 설계도면

2) 설계도서는 시공자가 쉽게 이해 및 시공이 될 수 있도록 작성하여야 하며 공사시방서와 공사내역서, 설계도면이 상호 일치되게 작성하여야 한다.

3) 설계도서는 원칙적으로 구 해양수산부의 “건설공사집행규정” 및 감독자와 협의하여 작성하도록 한다.

4) 구조물별로 또는 동일 구조물이라 하여도 부위별로 각각 소요 콘크리트강도와 굵은 골재 허용 최대치수 등을 설계도면과 공사시방서에 명기하여야 한다.

7.2 설계도 작성

1) 설계도면은 “항만건설통합정보시스템 운영규정(구 해양수산부 훈령 제389호)” 제16조(전자도면의 작성 및 납품)규정에 부합될 수 있도록 감독자와 협의(CAD로 작성 CD로 제출 등)하여 작성․납품하여야 한다.

2) 구조물 부위 중 특히 시공에 유의하여야 할 부위나 구조형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도 설계상세도를 작성하여야 하며 시공시 필요한 시공 상세도면의 작성목록을 별도로 작성하여 시공시의 품질관리가 적정하게 이루어지도록 하여야 한다.

3) 구조물의 일반도, 측면, 정면도 및 복잡한 부위에 대한 상세도를 그려야 한다.

4) 단계별 시공을 고려하여 설계도면을 작성하여야 하며 절단부 및 이음부는 품질관리를 위해 상세도를 작성하여야 한다.

5) 철근배근도, 철근수량표를 작성하여야 하며, 특히 단부 등에 대한 상세배근도와 철근피복두께 확보 및 정․부철근 등의 간격유지를 위한 받침 및 간격유지재의 재료 및 설치위치도, 상세도를 작성하여야 한다.

6) 구조물에 발생 가능한 균열의 종류, 허용폭 등에 대하여 서술하고 균열발생시의 처리방법 등에 대하여 명시하여야 한다.

7) 상세도로 표시할 수 없는 주의사항(시공시 유의사항 등)에 대해서는 우선적으로 도면에 명기하고 그렇지 못할 경우에는 공사시방서의 각 절(section) 내의 “특기사항” 또는 공사시방서의 마지막 부분(part) “ 특별사항” 내에 필히 작성되어져야 한다.

7.3 공사시방서 작성

1) 공사시방서는 설계도면 등에 표현될 수 없는 내용과 보충 설명하는 사항, 시공과정에서 필요한 기술적인 사항 등이 포함될 수 있도록 작성하여야 하며 시공과정에서 분쟁 또는 클레임(claim)이 발생되지 않도록 유의하여 작성하여야 한다.

2) 공사시방서는 항만공사 전문시방서를 기준으로 하여 작성하되 항만공사 표준시방서등 기타 이 공사의 시행과 관련된 표준시방서 및 전문시방서를 참고로 작성하여야 한다.

3) 공사시방서의 항목은 설계내역서의 공종에 따라서 작성하여 쉽게 검토․이용할 수 있도록 하여야 한다.

4) 공사시방서의 항목별 작성기준(format)은 다음과 같아야 한다.

① “1 일반사항”	② “2 재료”	③ “3 시공”	④ “4 특기사항”

5) 이 과업에 의하여 시공되는 공사와 관련하여 공종별로 특별히 고려하여야 할 사항은 앞의 (4)항의 “4 특기사항”에 상세하게 각각 기술하여야 하며 개별 항목(section)에 포함시키기 어려운 경우에는 통합하여 공사시방서의 가장 뒷부분에 “특별사항”이라는 제목(Title)으로 그 내용을 상세히 작성하여야 한다.

6) 이 과업에서 검토된 안전관리 및 품질관리, 기타 설계도면 작성시 도면에 표기되어질 수 없는 내용등 공사시공과 관련하여 필요한 내용은 공사시방서에 포함되어야 한다.

8. 성과물 제출

1) 수급인은 과업수행 중에 생산된 각종 조사, 연구, 검토결과를 정리하여 실시설계보고서를 작성 제출하여야 한다.

2) 실시설계보고서에는 각종 보고서(조사보고서, 구조계산서등 모든 보고서)에 대한 목록이 포함되도록 하여 이 과업과 관련하여 제출되는 보고서의 종류와 종류별 권수를 언제라도 알 수 있도록 하여야 한다.

3) 수급인은 각종 설계도서를 아래와 같이 작성하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 발주처와 성과물 항목 및 수량조정 등을 협의하여 조정할 수 있으며  수급인은 발주처의 지시에 따라야 한다.

① 보고서 및 부록 : 25부

② 설계도서(일체) : 10부(도면포함)

③ 각종원도

- 각 공종별  A3 축소판 도면 : 10부

- 계획평면도 및 표준단면도(A4, A3) : 각 10부

④ 조감도(A1 / 칼라 - 액자) : 1부

⑤ 인․허가 도서 1식

4) 기 타

① 지형측량 성과도 : 1식

② 지반조사 결과시료 및 시료상자(사진으로 판독할 수 있도록 촬영 등) : 1식

③ 사진첩 : 2부

④ CD(보고서 및 부록, 설계서 및 도면, 수심측량 및 각종 측량성과도, 기타 필요한 자료 등) : 1식

⑤ 기타 이 과업수행으로 인하여 생산되는 각종 도서 등 : 1

Ⅱ.  예  정  공  정  표

과 업 내 용	수 량	제 1 월	제 2 월	제 3 월	제 4 월	제 5 월	제 6 월	제 7 월	비 고
1. 지형측량	1식
2. 지반조사 및 시험	1식
3. 기본 및 실시설계	1식
4. 보고서작성 등(기타)	1식
공 정 ( % )		10	20	20	20	10	10	10
누 계 ( % )		10	30	50	70	80	90	100

Ⅲ. 설 계 예 산 서

2010년 6월 설계	설계자		심사자		담당		과장		국장
2010년도 제주외항 국제여객터미널 신축공사 기본 및 실시설계용역 예산내역서 ◦ 용역개요 : 기본 및 실시설계용역 1식 ◦ 총 용 역 비 : 794,000,000원 (부가세 : 71,745,454원 포함) (손해배상보험료 : 4,800,000원 포함)

Ⅳ.  일 위 대 가 표

Ⅴ.  단 가 산 출 표

Ⅵ.  산 출 근 거