2010년도

모슬포남항 어항시설정비사업 사후환경영향조사용역 설계서

제주특별자치도

목        차

═══════

1.	과 업 지 시 서
	1) 과 업 개 요
	2) 일 반 사 항
	3) 사후환경영향조사 세부사항
2.	예 정 공 정 표
3.	설 계 예 산 내 역 서
4.	일위대가표
5.	산출내역

6. 조사 위치도

1. 과   업   지   시   서

1) 과 업 개 요

1. 과 업 명 : 모슬포남항 어항시설정비사업 사후환경영향조사용역

2. 위    치 : 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 일원 및 공유수면

3. 목    적 : 본 과업은 환경영향평가상의 예측된 자연환경, 생활환경, 사회․경제환경상의 환경질 변화가 실제 「모슬포남항 어항시설정비사업」공사시행으로 인하여 일어나는 환경질 변화와 상관성이 있는지 여부를 조사하고, 저감방안으로 제시된 대책의 성실한 이행여부를 확인하는 것이며, 필요한 경우 공사 중 환경보존대책을 수립 시행하여 환경오염을 최소화하는데 그 목적이 있다.

4. 과업범위 :

○ 운영시 사후환경영향조사

- 해양생태계, 해양수질조사, 해양환경조사(해안선측량)

5. 과업기간 : 착수일로부터 5년으로 한다.

6. 과업 설계변경조건

다음과 같은 사항발생시 계약금액 범위내에서 설계변경 할 수 있다.

1) 과업범위의 증·감이 있을 때

2) 기타 발주부서의 계획변경등 설계변경이 필요하다고 인정될 때

2) 일 반 사 항

1. 본 과업지시서는 모슬포남항 어항시설정비사업 사후환경영향조사 용역과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 우리청의 관련규정에 의하여 감독자와 협의하여 수행하여야 한다.

2. 수급인은 계약체결후 7일 이내에 과업을 착수하여야 하며, 착수전에 착수계, 과업내용별 수행계획서, 책임기술자 선임계, 조사 참여자 명단 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 제출하여야 한다.

3. 본 과업수행에 참여하는 인원 및 기술진은 각 분야에 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

4. 과업실적보고는 매 측정시마다 감독자 경유 서면으로 보고하고 과업 완료 20일이전에 종합보고를 하여야 하며, 기타 감독자가 필요하다고 인정할 시 승인기관의 협의사항 및 추진사항을 보고하여야 한다.

5. 본 과업은 어항개발사업지구에 대한 사후환경영향조사로서 관계법령에 따라 원활히 수행될 수 있도록 하고 과업기간내에 정해진 일정에 차질이 없이 사후환경영향조사 및 보고를 완료하여야 한다.

6. 수급인은 본 과업수행에 있어서 관계기관의 요구가 있을 경우 관련기관의 의견을 면밀히 검토하고 전문분야별로 전문기관 또는 전문가에게 별도 자문을 받아 감독자와 협의하여 계획에 반영하여야 한다.

7. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는 중요사항은 우리청과 협의하여 결정하고 기타 경미한 사항에 대하여 감독자가 별도 추가 과업이 필요하다고 인정할 시에는 수급인 부담으로 즉시 보완하여야 한다.

8. 과학적이고 능률적인 과업수행을 위하여 전산처리에 의한 결과를 수록하여야 하며, 본 과업수행에 필요하다면 외국의 전문기술 및 지식을 활용하고 적용된 자료는 그 출처를 명시하여야 한다.

9. 본 과업으로 인하여 수급인이 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인이 손실보상을 하여야 한다.

10. 수급인은 조사업무를 수행함에 있어 발주부서의 지시에 따라야 하며, 감독자는 필요한 경우에 업무수행 상황보고를 요구할 수 있다.

11. 본 과업중 보고서 및 승인관련도서 등 성과품 작성시 감독자와 협의하여 정한다.

12. 사업계획변경, 도시계획 등 상위계획의 변경이나 발주부서가 필요하다고 인정하는 경우 또는 인․허가 승인기관 의견처리 등의 사유로 필요한 경우에는 과업내용을 변경할 수 있다.

13. 발주부서에서 조사업무 수행내용이 적합하지 아니하거나 성과품의 내용이 요구하는 바와 적합하지 아니하다고 인정될 때에는 이의 보완을 요구할 수 있으며, 수급인은 요구에 응하여야 한다. 또한 관리청에 보고서 제출시 조사성과와 관련하여 관리청에서 보완요구가 있을 경우 수급인은 준공여부에 관계없이 보완지시에 응하여야 한다.

14. 본 과업은「모슬포남항 어항시설정비사업」에 따른 사후환경영향에 대하여 조사전 감독자의 승인을 받아야 하며 필요시 환경영향저감 대책을 강구하여야 한다.

15. 폐기물에 대한 조사는 환경영향평가의 협의내용에 따라 사후환경영향조사계획을 수립하고 자체 관리대장을 기록 제출하고 보고서에 정리하여야 한다.

16. 본 용역에 포함된 여비는 용역준공전 정산하여 사용치 못한 부분은 감액조치한다.

17. 보고서 작성

① 사후환경조사결과만을 제시하지 말고 조사결과를 면밀히 검토․분석하여 환경에의 악영향 사례를 파악, 그에 따른 저감대책 강구방안을 수록할 것.

② 매반기 마다 조사결과 보고서를 작성 제출하여야 한다.

③ 당해의 조사결과 및 제주도 환경영향평가 협의내용에 대한 조사결과를 취합하여 관련 규정[환경영향평가법제24조 및 동법시행령 제33조(환경부령)별지1호의2서식]에 따라 작성하고, 용역 준공일 까지 사후환경영향조사 최종보고서 5부를 작성 제출하여야 한다.

3) 사후환경영향조사 세부사항

○ 운영시

구 분	조사항목	조사지점	조사주기
해양환경조사	하모해수욕장 해안선측량	서귀포시 대정읍 하모리279번 지선	반기 1회 (태풍내습전․후 1회 포함)
해양생태계	동․식물플랑크톤, 저서동물, 해조류, 어류, 어란 및 치자어	사업지역 주변해역 3개지점	반기 1회
해양수질	pH, BOD, SS, DO, T-N T-P	사업지역 주변해역 4개지점	반기 1회

1. 해안선측량

(1) 해안선측량은  “서귀포시 대정읍 하모리 279번지”에 대하여 조사를 시행한다.

(2) 해안선(지형)측량은 정비계획수립 용역시 수행된 내용을 검토하여 이를 최대한 이용(모슬포남항 정비계획용역시 매설된 보조삼각점 및 지형측량성과도 이용)하여 경제적이고 효율적으로 실시하여야 하며 검토내용을 보고서에 수록하여야 한다.

(3) 측량은 국립해양조사원의 T.B.M을 기준으로 실시하여야 하고 사전감독자와 충분히 협의하여야 한다.

(4) 해안선측량 지역에 대한 지형을 조사하고 대상지의 지리학적인 위치와 특성 등을 파악․정리하여야 한다.

(5) 계획대상지의 어항에서의 위치와 주변 시설물의 위치를 조사․정리하여야 한다.

2. 조사결과의 활용

(1) 보다 상세한 모래거동양상의 파악을 위하여 약최저저조면과 약최고고조면사이 해면에 대하여 20M간격을 기준으로 횡단면도를 작성하고 측량 전․후의 모래 거동양상(모래이동 경향 및 정량적분석 포함)을 검토하여야 한다.

2.  예  정  공  정  표

과업내용		과 업 기 간(1년×5회)													비고
		1월	2월	3월	4월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1. 해양환경조사
2. 해양생태계
3. 해양수질
4. 폐기물
5. 보고서 작성
공정(%)	월 별	5	10	5	10	10	5	10	10	5	10	5	10	5
	누 계	5	15	20	30	40	45	55	65	70	80	85	95	100