목        차

Ⅰ. 감리용역설명서

Ⅱ. 일반과업지시서

Ⅲ. 특별과업지시서

Ⅳ. 보안 및 기타 유의사항

Ⅴ. 감리원근무계획표

Ⅵ. 설 계 예 산 서

Ⅰ. 감리 용역 설명서

1. 과업목적

본 용역은 구례군관내 국도17,19호선 일부구간에 대한 일상관리 업무를 총괄 시행하는 사업으로서 유지․관리업무의 철저한 수행으로 시설물을 항상 최선의 상태로 유지하여 차질 없는 도로운영은 물론 도로이용자에게 최상의 서비스를 제공하는데 그 목적이 있다.

2. 과업범위

가. 사 업 명 : 국도17,19호선 구례군관내 일상관리 용역

나. 노 선 명 : 국도17호선 등 구례군관내 국도 65.3km

- 국도17호선(여수~용인) : 구례교차로~구례군청~구례구역~압록4거리~읍내교차로~전북도계 30.6km

- 국도19호선(남해~홍천) : 경남도계~동방천3거리~구례교차로~광의4거리~산동교차로~전북도계 34.7km

다. 위    치 : 국도17호선 : 구례군 마산면 냉천리~곡성군 곡성읍 신기리

국도19호선 : 구례군 토지면 외곡리~구례군 산동면 계천리

라. 과업개요

가) 시설물 일상관리 및 점검

○ 노면잡물 등 장애물 제거

○ 교통사고현장 응급조치

○ 도로 노면 청소

○  응급복구 및 안전조치

○ 강설시 긴급 제설작업

○ 시설물 점검

나) 강설시  제설작업

다) 시설물 유지보수

○ 손상 시설물 보수

○ 시설물 유지관리 시스템에 의한 시설물 유지관리 기록 관리 및 자료입력 보고

라) 시설물에 대한 유지보수 작업시행

○ 소규모 구조물 보수 및 보강작업

○ 포트홀 보수 및 유제살포 등 소규모 포장보수작업(자제는 사무소지급)

○ 토목시설의 경미한 보수

○ 교통안전시설물 관리, 청소 및 보수

○ 각종 도로표지판 청소 및 정비

○ 배수로 정비(준설 및 청소)

○ 기타 작업

마) 비상 및 풍수해 대비등 각종 훈련에 대한 지원 및 참여

바) 유지관리지침서 개발 및 유지관리시스템 보완 등 기술지원

사) 계약과 관련한 행정사항의 기록보존 및 관리

아) 도로점용 업무

자) 기타 도로이용객의 안전운행과 도로의 기능유지를 위한 업무 및 지시사항

Ⅱ. 일  반  과  업  지  시  서

1. 당해 공사의 설계도서, 감리업무수행지침서, 감리과업지시서와 아래의 각종 시방서 및 규정에 의하여 책임감리를 수행할 수 있도록 관련 자료를 사무실에 비치하여 이를 충분히 숙지하고 철저히 이행하여야 한다.

가. 도로의 구조․시설기준에 관한 규칙

나. 건설교통부 제정 각종 공사 표준시방서 및 설계기준

․ 당해 공사시방서

․ 토목공사 표준 일반시방서

․ 도로공사 표준시방서

․ 도로교 표준시방서

․ 도로포장 설계 및 시공지침

․ 콘크리트 표준시방서

․ 터널공사 표준시방서

․ 하천공사 표준시방서

․ 구조물 기초설계기준

․ 도로설계기준

․ 콘크리트구조설계기준

․ 하천설계기준

․ 국도건설공사 설계실무요령

다. 일반국도 구조물 표준도

라. 도로관련 각종 지침

도로업무 통합지침, ․환경친화적인 도로건설지침, ․암파쇄 방호시설설치지침, ․도로터널 방재시설설치지침

․도로배수시설 설계 및 유지관리 지침, ․도로절토사면 유지관리지침, 도로표지관련규정, ․도로안전시설 설치 및 관리지침, 보도설치 및 관리지침 등

마. 건설공사 관련 법령 및 규정(국가계약법, 건설기술관리법, 건설산업기본법, 도로법, 하천법, 국토의계획및이용에 관한법률 등)

바. 한국산업 규격

사. 건설공사 품질 및 규격관리실무 편람

아. 환경․교통․재해 등에 관한 영향평가법

자. 산업안전보건법

차. 문화재관리법

카. 전력기술관리법

타. 기타 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

2. 감리원의 기본업무

가. 건기법 시행령 제52조와 동법 시행규칙 제34조의 규정에 의한 감리원의 업무를 성실히 수행하여야 한다.

나. 발주처와 감리전문회사간에 체결된 감리용역 계약의 내용에 따라 감리원은 당해 공사가 설계도서 및 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리, 공정관리, 안전 및 환경관리 등에 대한 기술지도를 하며, 발주처의 위탁에 의하여 관계법령에 따라 발주처의 감독 권한을 대행하여야 한다.

다. 검측업무를 수행하는 감리원은 당해공사의 특성, 공사의 규모 및 현장조건을 감안하여 현장별로 수립한 검측체크리스트에 따라 설계도서에서 정한 규격 및 치수 등에 대하여 시설물의 각 공종마다   육안검사․측량․입회․승인․시험 등의 방법으로 검측업무를 수행하여야 한다.

라. 시공자가 검측업무를 요청할 경우에는 즉시 검측업무를 수행하고 그 결과를 시공자에게 통보하여야 한다.

3. 감리원의 근무수칙

가. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어 발주처와의 계약에 의하여 감리업무를 대행한다.

나. 감리업무에 종사하는 자는 감리업무수행지침서 제5조 ②항 각호의 업무를 성실히 수행하고, 건설공사의 품질향상에 노력하며, 감리원으로서의 품위를 유지하여야 한다.

다. 상주감리원은 감리업무수행지침서 제5조 ③항의 각호에 따라 현장근무를 하여야 한다.

라. 비상주 감리원은 감리업무수행지침서 제5조 ④항의 각호에 따라 업무를 수행하여야 한다.

마. 도로운영사업의 특성을 감안하여 여러 장소의 다양한 현장을 효과적으로 관리할 수 있도록 계획 및 관리하여야 한다.

4. 감리업무 절차 및 운영

가. 절차

1) 책임감리원은 비상주 감리원 및 보조감리원의 개인별 업무분장 내용에 따라 업무수행계획을 수립하고 다음 절차에 의거 과업을 수행토록 하여야한다.

										․일일 감리계획 수립(책임감리원) ․현장감리원별 수행업무 지정․지시사항 시달 ․지정된 업무에 대한 시공 및 품질관리 계획등의 검토 ․착안사항 준비 및 지시사항 숙지
							일일 감리계획 수립
							(1일전)
										※ 사전준비 : 설계도서의 숙지, 시공법 및 관련 작업내용 파악, 검측요령 작성
										․시공상태 확인 ․시험실시 입회 및 성과 확인 ․각종 검측 등 지정업무 수행 ․지적사항 시정조치 결과 확인 등 ․일일업무 수행일지, 감리일지, 자재수불부정리(관급), 검측대장 등
							감 리 원
비상주감리원										※ 주요구조물은 전공종 비디오 촬영 기록
				․현장조사분석 ․주요구조물의 기술적 검토 ․기성 및 준공검사 ․행정지원업무등						․당일 수행업무 분석 및 평가 ․문제점 토의 및 시정 등
							일 일 평 가
										․부실공사 방지대책 토의 ․품질 및 안전관리사항 이행상태 ․공사추진 계획 및 실적 ․공사추진 저해요인 분석 ․지시사항에 대한 이행상태 ․기타문제점, 애로 및 건의사항 등
							주 간 평 가
										※ 현장대리인, 업무담당관과 합동회의 실시결과는 월간보고서에 수록 제출
				월간 또는 최종보고서 작성 제출

나. 운영

1) 감리단의 조직은 도로운영사업의 특성을 감안하여 책임감리원은 본인 및 보조감리원에게 개인별로 업무를 분담하고 분담내용에 따라 업무수행계획을 수립하여 과업을 수행토록 하고 매일 감리업무의 추진 계획 및 실적이 기록된 개인별일지를 취합하여, 그 내용을 확인. 점검하고 이를 비치하여야 하며 준공시에는 발주처의 장에게 제출하여야 한다.

2) 감리원은 업무계획을 수립, 운영하고 특히 엄격한 품질관리를 위하여 공사단계별 품질시험을 철저히 이행하여야 하며, 미 시행 또는 불합격일 경우 즉시 시정토록 하고 그 구간에는 재시공을 실시하여 시정이 완료될 때까지 후속공사를 시켜서는 안된다.

3) 감리원의 구성은 과업지시서에 기술된 과업내용에 의거 관련 분야 기술자격자 또는 학력, 경력을 갖춘자로 구성하고 공사발주 초기에 보상 등이 지연되거나, 민원발생 등으로 공사추진이 원활치 않을 경우와 동절기 공사중지기간, 해빙기로 인하여 공사 진척이 잘 안되는 경우 및 공종이 단조로워질 때 등을 고려하여 추가 공종과 공사 진행 상태에 따라 발주처와 협의하여 인력을 탄력적으로 조정․운용하여야 한다.

4) 각 감리원이 작성 비치하여야 할 일지에는 다음 내용 등이 수록되어야 한다.

가) 일감리업무 수행내용

- 주요 구조물 등의 검측결과, 지적사항 및 시정조치사항

나) 시공과정에서의 문제점과 이의 해결방법 등 시공에 대한 전반적인 자체 평가서

다) 민원사항 접수, 처리 및 조치계획

라) 공사추진중에 발생된 실패 사례를 육하원칙에 따라 상세히 기록하고 개선결과도 상세하게 기록, 작성

마) 품질관리시험 실시, 지도 및 시험성과에 관한 검토, 확인

바) 재해예방대책 및 안전관리의 지도

사) 하도급에 대한 타당성 검토

아) 용지보상 지원 및 민원사항 해결을 위한 업무수행

자) 기타 주요감독업무 수행사항

5) 발주기관의 자문요구

가) 발주기관은 당해 공사와 관련하여 공법의 변경, 특수공법 등에 대한 기술적인 자문을 요구할 수 있으며 이 경우 감리전문회사는 필히 자문에 응하여야 한다.

나) 감리원은 발주기관장이 요구하는 중요한 사항에 대하여 본사 지원반을 운영 자문하여야 하며, 검토가 불가능하여 제3자에게 의뢰해야 하는 전문성을 요하는 자문은 발주기관과 협의하여 국내외 전문가에게  자문을 받아 의견을 제시하여야 한다.

5. 일반과업지시서의 내용과 특별과업지시서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별과업지시서가 우선한다.

6. 일반 및 특별과업지시서에 명기된 내용이외에 정밀공사 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주처와 협의하여 시행하여야 한다.

7. 비상주감리원은 도로운영사업을 원활하게 추진될 수 있도록 필요한 인원을 투입하여야 한다.

Ⅲ. 특  별  과  업  지  시  서

1. 감리용역기간 : 본 용역의 과업수행기간은 착수일로부터 전체 24개월, 금회 12개월로 한다.

2. 설계변경조건

가. 건기법에 의한 감리대가 기준이 변경되었을 때

나. 감리기간 및 책임감리의 중단 등으로 감리기간이 증․감되었을 때

다. 감리업무량에 따라 감수원수의 증․감이나 등급변경이 있을 때

라. 제경비 및 기술료는 직접인건비 증․감에 따라 정산한다.

마. 직접경비는 당해 업무 수행에 필요한 감리원의 현지근무 수당, 숙박비 및 현지운영 등에 필요한 아래 비용을   포함하며 계상 기준은 건설공사 감리대가기준에 따른다.

1) 감리원의 주재비 및 출장여비는 직접인건비의 증․감에 따라 정산

2) 현지차량 운행비 및 현지사무원 급료는 실지에 맞추어 정산

3) 보고서등 인쇄비는 발간부수 및 면수에 따라 정산

바. 야간 및 휴일근무 등으로 감리원의 근무일수에 변경이 있을 때

사. 기타 발주기관의 사정에 의한 예산의 증․감, 물가변동 등 정당한 사유가 발생되었을 때

아. 발주처의 필요에 의하여 업무변경이 있을 때

3. 감리원의 배치기준

가. 감리용역 수급자는 본 감리용역의 입찰참가자격심사시 입찰참가 제안서에 명시된 자로 하여금 참여하여야 하며, 만약 불가피한 경우에는 자격 및 해당분야 경력이 그 이상이거나 동등한 자로 하여 발주처의 승인을 득한 후 교체할 수 있다.

나. 사업의 특성을 감안하여 감리업무를 책임감 있게 수행하고 모든 분야에서 책임감리를 완수할 수 있는 능력과 자격을 갖춘 자로서 감리수행 능력이 우수한 다음과 같은 기술자를 현장에 배치하고 특별한 사유가 없는 한 감리용역 완료시까지 근무토록 하여야 하며 감리수행중 부적격 사유가 발생하여 발주처의 장이 교체를 명 할 때에는 이에 응하여야 한다

1) 감리사(감리총괄) : 건기법시행령 제51조의2 제1항 관련 별표 3의 자격기준자로서 건기법 시행규칙 제34조의 2에서 규정한 책임감리원 경력 기준이상인자

2) 감리사보(시공,품질 및 안전관리 업무) : 건기법시행령 제51조의2 제1항 관련 별표 3의 자격기준 이상인자

3) 비상주감리원(현장감리 업무의 지원) : 수석감리사 자격이상의 자로서 토목시공, 도로 및 공항, 구조, 토질 및 기초 등의 기술사 자격 소지자 및 경력자

나. 상주감리원의 배치는 발주기관의 사전승인을 받아야 하며, 발주처의 장은 현장여건에 맞추어 감리원의 현장 상주감리원 및 감리원 자격등급을 조정할 수 있다.

4. 세부수행 업무

가. 공사착수단계 감리업무

감리업무수행지침서 제7조 내지 제18조의 규정에 준용하여 감리업무를 수행한다.

나. 공사시행단계 감리업무

1) 감리업무수행지침서 제9조 내지 제53조의 규정에 준용하여 감리업무를 수행한다.

2) 폐기물 처리 및 폐도 처리계획

가) 책임감리원은 공사현장에서 발생되는 폐기물위탁처리에 대한 용역발주ㆍ변경설계서를 작성ㆍ제출하여야 한다.

나) 책임감리원은 공사현장에서 배출되는 건설폐기물에 대하여는 폐기물관리법 등 관계법에 의거 신고, 수집, 운반, 처리, 보관 등에 관한 필요한 조치를 취하여야 한다.

다) 책임감리원은 공사현장에서 발생되는 폐기물 처리현황을 매월 발주처에 보고하여야 한다.

라) 책임감리원은 관계규정에 의거 폐기물처리용역에 대한 기성, 준공검사를 실시한다.

마) 책임감리원은 공사로 인하여 발생된 폐도에 대한 활용여부를 조사하여 구국도 관리에 관한 업무 지침에 의거 계획을 수립하여야 한다.

바)  폐도부지 활용을 위한 현장조사시에는 지방자치단체의 관계자를 참석시켜 의견을 들은 후 폐도부지 면적, 크기, 모양 또는 지형여건에 따라 활용여부를 판단하여야 한다.

사) 활용여부 검토 후 폐도부지에 대하여 분할측량(행정조치에 대하여는 기초자료를 작성하여 발주처에 보고)을 실시하여 용지도를 작성하고, 등기부등본, 토지대장(임야대장), 폐도부지 조서, 활용방안 등을 준공 2개월 전까지 발주처에 제출하여야 한다.

3) 감리업무 기록관리와 발주처 보고

가) 감리원은 다음 각 호의 문서가 포함된 감리보고서를 분기마다 CD-ROM으로 작성하여 다음달 7일 이내에 발주처에 2부를 제출(시설물의 안전관리에 관한 특별법에서 정한 1종시설물이 포함되지 않은 공사에 대하여는 1부 제출)하여야 하되, 발주처의 요구가 있을 때나 CD-ROM 작성 완료시에는 즉시 제출하여야 하며, 구조물 안전에 영향을 미치지 아니하는 L형측구 등 단순 구조물에 대하여는 발주처와 협의하여 제출하지 아니할 수 있다. 발주처는 CD-ROM으로 제출받은 감리보고서 중 1종시설물이 포함된 공사에 대하여는 제출 받은지 7일이내에 1부를 감사원에 제출하여야 한다.

(1) 감리보고서 표지등

(2) 책임감리원업무일지

(3) 보조 감리원 업무일지

(4) 품질시험․검사현황

(5) 구조물별 콘크리트 타설현황, 콘크리트 타설 참여자(기능공 포함) 실명부를 첨부

(6) 검측요청․결과 통보서

(가) 공사참여자(기능공포함) 실명부 첨부

(나) 검측체크리스트 첨부

(7) 주요자재 검사 및 수불부

(8) 공사설계 변경현황

(9) 주요구조물 단계별 시공 현황

(10) 콘크리트 구조물 균열관리 현황

(11) 공사사고 보고서

(12) 기타

나) 감리원은 감리업무수행상 필요한 경우에는 다음 각 호의 문서를 별지 서식을 참조하여 작성․비치하여야 한다.

(1) 문서접수 및 방송대장

(2) 민원처리부

(3) 품질시험계획

(4) 품질시험․검사성과 총괄표

(5) 시험․검사실적보고서

(6) 검측대장

(7) 발생품(잉여자재)정리부

(8) 안전보건 관리체제

(9) 재해 발생현황

(10) 안전교육실적표

(11) 협의내용 등의 관리대장

(12) 사후 환경영향조사 결과보고서

(13) 공사 기성부분 검사원

(14) 감리원(기성부분, 준공) 감리조서

(15) 공사 기성부분 내역서

(16) 공사 기성부분 검사조서

(17) 준공검사원

(18) 준공검사조서

다) 감리원은 당해공사에 관하여 다음 각 호의 사항을 포함한 최종감리보고서를 CD-ROM으로 작성하여 감리기간 종료 후 14일 이내에 감리전문회사 대표자 명의로 발주처에 제출하여야 한다. 이 경우 CD-ROM의 제출방법, 대상시설물 및 수량은 가)항의 규정에 따른다.

(1) 사업개요 : 건설공사 및 감리용역 개요(계약현황 포함)

(2) 기술검토내용 총괄 실적

(3) 공사추진내용 총괄 실적 : 인력, 장비투입 현황등

(4) 검측내용 총괄 : 공종별 불량률, 부실 유형별 원인 및 방지대책

(5) 우수시공 및 실패시공 사례

(6) 품질시험․검사 총괄, 품질관리비 사용 실적

(7) 주요자재관리 실적 총괄

(8) 안전관리 실적 총괄 : 안전관리 활동, 안전관리비 사용실적, 안전사고 발생건수 및 원인 방지대책

(9) 종합분석

라) 감리원은 시공자가 작성한 공사일지를 제출 받아 확인한 후 보관하여야 한다.

마) 책임감리원은 가)항 (2)호의 책임감리원 업무일지를 작성할 때에 본인의 업무내용을 기록함은 물론 보조감리원들의 업무일지를 보고 그 내용을 요약․정리함과 동시에 공사추진내용, 검측결과, 현장실정 보고 등을 빠짐없이 작성하여 모든 감리원에게 공람․서명토록 하여 감리원 모두가 현장내용을 파악할 수 있게 하고 투명한 감리업무가 이루어 질 수 있도록 하여야 한다.

바) 책임감리원은 발주처에서 「건설기술관리법」 제21조의 5, 시행령 제38조의 20, 시행규칙 제13조의 7 규정에 의거 건설공사 현장점검시 우리소에서 마련한「건설공사 시공실태점검계획」따라 관련 자료를 작성․비치하여야 하며 요구시 제시하여야 한다.

다. 설계변경 및 계약금액의 조정 관련 감리업무

감리업무수행지침서 제54조 내지 제56조의 규정에 준하여 감리업무를 수행하여야 한다.

Ⅳ. 보안 및 기타 유의사항

1. 국가보안상 중요하다고 생각되는 모든 기록과 자료는 사건장치가 되어있는 함에 보관하고 열쇠는 책임감리원이 소지하여야 한다.

2. 모든 비밀문서는 관리번호를 부여하고, 보관관리기록부에 기록한 후 사건장치가 이중으로 되어있는 함에 보관하여 열쇠는 책임감리원이 소지하여야 한다.

3. 감리원은 본 업무와 관련 있는 모든 기록과 자료에 대하여 업무와 관련 없는 일에 사용할 수 없으며, 발주기관의 사전서면 승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

4. 편집된 모든 도서 및 기타 자료를 다른 목적에 이용 또는 이용토록 할 수 없으며, 감리업무수행 중 취득한 사실을 누설하여서는 안되며 누설로 인하여 문제점이 발생될 시에는 감리원은 물론 감리전문회사가 모든 책임을 진다.

5. 도로망 구성, 사무소의 위치, 도로관리사업 통합감리업무의 특성을 감안, 감리사무실은 논산시내권에 설치 운영하여야 하며, 사무실 위치를 변경해야 할 경우에는 발주처와 협의을 거쳐야 한다.

6. 본 용역은 우리사무소 보수과에서 용역감독을 수행하는 과업이므로, 용역감독 관련업무는 보수과장의 지시를 받아 수행하여야 한다.