2010년도

울릉(사동)항 2단계 개발사업 환경영향평가용역 설계서

경 상 북 도

목          차

1. 과업의 개요	1

1. 1 과업명	1

1. 2 과업의 목적	1

1. 3 과업의 위치	1

1. 4 과업의 범위	2

1. 5 과업기간	2

1. 6 과업 수행방법	2

2. 일반사항	3

2.1 과업수행의 기준	3

2.2 과업착수와 관련된 제출물	3

2.3 참여기술자	4

2.4 과업지시서의 해석	4

2.5 과업추진에 대한 일반사항	5

2.6 과업수행결과에 대한 책임	5

2.7 하도급 시행	5

2.8 위반행위에 대한 조치	7

2.9 보고사항	7

2.10 성과품의 소유	8

2.11 용역 결과물의 저작권	9

2.12 보안대책	9

2.13 기타사항	9

3. 세부시행지침	10

3.1 일반사항	10

3.2 세부과업내용	13

4. 성과물 제출	17

5. 예정공정표	18

6. 설계예산내역서	별책

1. 과업의 개요

1.1 과업명 :  울릉(사동)항 2단계 개발사업 환경영향평가용역

1.2 과업의 목적

본 용역은 울릉(사동)항 2단계 개발사업 시행과 관련「환경영향평가법」및「환경영향평가서 작성 등에 관한 규정」에 의거하여 환경에 미치는 직ㆍ간접적인 환경요인 파악 및 영향을 예측‧평가하며, 공사시 및 운영시 발생하는 악영향에 대한 종합적이고 적정한 저감방안을 강구하여, 이를 본 사업계획에 반영함으로써 환경오염과 재산상의 피해를 최소화하고 주변환경을 효과적으로 보존하는데 그 목적이 있음.

1.3 과업의 위치

경상북도 울릉군 울릉읍 사동리 전면해상 일원

1.4 과업의 범위

◎ 환경영향평가 1식

◎ 과업대상 : 외곽시설 - 동방파제 650m, 북방파제 300m, 방파호안 240m

접안시설 - 여객부두(5,000 톤급) 150m, 보안부두 370m(해군, 해경부두), 기타부두 305m

1.5 과업기간

착수일로부터 12개월 간으로 한다.

1.6 과업 수행방법

본 과업지시서에 의거 도급으로 수행한다.

2. 일반사항

2.1 과업수행의 기준

(1) 용역과업수행은 이 “과업지시서”와 이 과업지시서상의 “2.2 (3)호의 과업수행계획서”에 의하여 시행하여야 한다.

(2) 수급인은 우선적으로 최신의 전문기술 지식을 활용하여야 하며, 용역성과가 발주청에 최대이익을 줄 수 있도록 과업을 수행하여야 한다.

(3) 도급자는 이 과업의 수행결과에 따라 산출된 공사비가 설계누락 또는 과다 계상이 되지 않도록 하여 공사 시공시 이로 인한 분쟁이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(4) 수급인은 기 시행된 기본계획 용역의 내용을 특별한 이유 없이 바꾸어서는 안 된다.

2.2 과업착수와 관련한 제출물

(1) 착수계 및 책임기술자 선임계

(2) 과업참여자 명단 및 보안각서

① 도급자는 과업에 참여할 사업책임기술자, 분야별 책임기술자 및 분야별 참여기술자(사업수행능력 평가대상자에 한함)를 담당과업 수행 분야별로 편성 운영하여야 한다.

② 사업책임기술자 및 분야별책임기술자는 자격증사본, 개인이력서를 첨부하여야 한다.

(3) 과업수행계획서

① 도급자는 본 용역 시행에 대한 수행계획, 수행방법 등에 대하여 과업수행계획서를 작성하여야 한다.

② 과업수행계획서는 용역과업을 단계별로 구분하여 작성하고 단계별 주요 검토사항 및 인원투입계획, 세부공정계획 등이 포함되어야 한다.

(4) 착수계 및 과업수행계획서 등은 착수후 10일 이내에 발주청에 제출하여야 한다.

2.3 참여기술자

(1) 사업책임기술자는 과업지시서 및 계약서에 명시된 업무와 계약조건을 충실히 이행하여야 하며, 모든 중요한 사항에 대하여 감독자와 협의하여야 한다.

(2) 용역에 종사하는 기술자는 과업수행계획서에 일치되게 투입되어야 한다. 단, 추가투입이나 사망, 지병, 기타사유로 교체가 불가피할 경우는 교체자의 자격 및 경력에 대하여 발주 청의 사전승인을 득하여야 한다.

(3) 참여기술자가 과업수행에 부적당하다고 판단되거나 태만하다고 인정될 때에는 해당자의 교체를 요구할 수 있고 수급인은 이에 응해야 하며, 이로 인한 용역과업의 지연이나 용역기간의 연장은 인정되지 않는다.

(4) 참여기술자의 업무내용은 분야별로 구분하여 환경영향평가서에 기재하여야 한다.

2.4 과업지시서의 해석

과업지시서상의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 발주청과 수급인이 의견을 달리하는 경우는 신뢰를 가지고 최대한 서로 협의하여 결정하되 협의가 되지 않을 경우는 발주청의 해석에 따르는 것으로 한다.

2.5 과업추진에 대한 일반사항

(1) 감독자가 수급인의 귀책사유로 과업수행이 지연된다고 판단하여 지시할 경우는 지시에 따라 지체 없이 과업이 예정대로 추진되도록 인력, 장비 등을 추가하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

(2) 이 과업지시서에 누락되었더라도 과업목적을 달성하기 위하여 당연히 필요한 사항은 감독자와 협의하여 수급인의 부담으로 시행하여야 한다.

2.6 과업수행결과에 대한 책임

(1) 발주청의 협의를 거친 사항이라도 설계상의 잘못이 발견될 시에는 추가비용의 청구 없이 수급인의 책임하에 수정 보완하여야 한다.

(2) 용역 수행결과의 잘못으로 인하여 중대한 재난이 발생하거나 설계잘못으로 인하여 발생되는 분쟁은 수급인이 책임을 져야 한다.

2.7 하도급시행

(1) 과업 수행을 위하여 타 전문기관을 활용하거나 하도급을 시행할 수 있으며, 이 경우 사전에 발주청의 승인을 받아야 하며, 계약과 동시에 하도급 계약내용을 발주청에 제출하여야 한다. 이 경우 선정된 타 전문기관은 발주청의 감독을 받는다.

(2) 발주청의 승인을 받지 않아도 되는 하도급의 범위는 다음과 같으며, 이 경우에도 계약과 동시에 하도급 계약내용을 발주청에 제출하여야 한다.

- 환경질 조사․분석, 해양생태계 조사, 경관시뮬레이션 분석, 지형특성 조사 등

(3) 하도급의 승인요청을 하는 경우 또는 하도급 계약내용 변경을 위하여 승인요청을 하는 경우에는 다음 사항을 명백히 하여야 한다.

○ 계약건명

○ 계약금액

○ 하도급 부분 및 내역

○ 하도급자

○ 계약 이행기간

○ 하도급 사유(하도급인 및 기타 하도급조건 변경시에는 변경하는 사유)

○ 계약서 사본(계약체결 후 제출)

○ 기타 참고사항

(4) 도급자는 하도급자로 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 풍부한 자로 선정하여야 하며 법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자만이 용역을 할 수 있는 경우에는 해당면허 또는 허가 등의 자격요건을 구비한 자로 선정  하여야 한다.

(5) 도급자는 하도급 부분에 대하여 기성고 지출이 되었을 때에는 지체 없이 하도급자에게 대금을 지급하여야 한다.

(6) 하도급에 의해 수행된 용역성과에 대해서도 발주청에 대한 책임은 도급자가 져야 한다.

2.8 위반행위에 대한 조치

(1) 다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 계약위반 행위로 간주하여 계약 해지 또는 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

① 제반지시사항을 특별한 이유 없이 기한 내에 이행치 않을 때

② 계약기간내에 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

③ 과업수행상 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

④ 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급 주었을 때

(2) 발주청이 계약위반 행위로 간주하여 계약해지 등의 조치를 취하고자 할 때에는 조치 전에 2회이상 수급인에게 과업의 성실한 수행을 요구하여야 한다.

2.9 보고사항

(1) 공정보고

착수 개시일로부터 매월 말일 정기 공정보고를 하여야 하며 보고양식은 감독자와 협의하여 정하도록 한다.

(2) 중간보고 및 최종보고

① 1회이상의 중간보고와 최종보고회를 실시하여야 하며, 보고횟수, 보고시기, 보고장소에 대해서는 감독자와 협의하여 결정하여야 한다.

② 도급자는 본 과업 완료 2개월 이전에 관계기관 협의 및 최종보고회를 개최함을 원칙으로 하며, 최종보고서(안)을 과업 완료 최소 1개월 이전에 제출하고, 발주청에서 수정 또는 보완을 요구하는 경우 그 내용을 검토하여 수정․보완하여야 한다.

③ 감독자가 특별히 필요하다고 판단하여 보고회의를 개최토록 지시하는 경우 수급인은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

④ 수급인은 과업완료 최소 1개월 이전에 최종보고서(안)를 제출하여야 하며 발주청에서 수정 또는 보완을 요구하는 경우 그 내용을 검토하여 수정․보완하여야 한다.

(3) 발주청에서 과업의 진행내용을 파악하기 위하여 수행된 과업내용에 대한 설명을 하도록 지시할 경우에는 수급인은 이에 따라야 한다.

2.10 성과품의 소유

수급인은 용역수행으로 인하여 발생한 각종 개발 및 조사자료와 환경영향평가계획서, 환경영향평가서(초안), 환경영향평가서, 측정결과보고서 등 일체의 성과품을 발주청의 소유로 하고 발주 청의 승인 없이는 제3자에게 제공하거나 이 용역 외의 목적에 사용할 수 없으며 준공시 발주청에 정리 제출하여야 한다.

2.11 용역 결과물의 저작권

용역 계약에 의해 수행된 결과물에 대한 저작 재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집 저작물의 작성권은 발주자가 소유하며, 발주자는 정책상 필요시 용역 결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정 할 수 있다.

2.12 보안대책

(1) 이 과업을 위하여 수집된 자료 및 과업수행의 결과에 대하여 철저한 관리, 보안을 유지하여야 하며 특별히 보안유지를 위하여 중요하다고 인정되는 서류와 자료 및 결과는 이의 누설, 분실, 도난을 방지하기 위하여 보안관리책임자를 지명하여 관리토록 하여야 한다.

(2) 용역 참여인원에 대한 서약서를 발주청에 제출하고 보안교육 등 보안조치를 강구토록 하며, 용역 참여인원의 변경시 과업내용의 사전유출 방지와 인수인계를 철저히 하여야 한다.

2.13 기타사항

(1) 용역보고서외에 도시계획반영 등과 같이 차후 이 용역과업에 의한 공사추진시 필요로 하는 자료가 있을 경우에는 별도로 작성 제출하여야 한다.

(2) 이 용역수행에 있어 제3자의 권리대상으로 되어있는 특허권 등을 사용할 때에는 수급인은 그 권리의 사용에 관하여 일체를 책임져야 한다.

(3) 현지조사 및 사후 증빙자료로 이용될 내용 등 용역관련 주요사항을 사진 촬영하여 사진첩을 작성, 원본과 함께 용역 완료시 제출하여야 한다.

(4) 수급인이 공동으로 용역과업을 수행할 때에는 과업의 효율적 수행과 작업능률 향상을 위해 발주청의 요구가 있을 때에는 합동사무실을 수급인 부담으로 설치하되, 설치위치에 대해서는 발주청과 협의한다.

(5) 감독자와 협의를 거친 사항이라도 설계상의 잘못이 발견될 시에는 추가비용 청구 없이 수급인의 책임 하에 수정․보완하여야 한다.

3. 세부시행지침

3.1 일반사항

(1) 본 과업의 범위는 사업시행으로 인한 대기환경, 수환경, 토지환경, 자연생태환경, 생활환경, 사회⋅경제환경 현황을 조사ㆍ분석하고 환경에의 영향을 예측, 평가하여 악영향에 대한 저감방안 및 환경보전 대책을 수립하여 관계법에 따라 환경영향평가에 대한 협의를 받을 수 있도록 충분한 자료를 마련, 별도의 보고서를 작성ㆍ제출한다.

(2) 본 과업과 관련하여 관계기관과 협의과정에서 미비한 사항에 대하여는 과업중 또는 완료후라도 필요한 자료를 작성ㆍ제시하여야 하며, 평가내용에 대한 설명 요청이 있을 때에는 이에 응하여야 한다.

(3) 환경영향평가에 필요한 해양생태계, 해양환경(해양수질, 해양저질), 대기질, 지표수질, 지하수질, 소음ㆍ진동 등의 현황조사항목에 대한 조사지점 및 필요횟수 등 상세 내용을 감독자와 협의하여 시행한다.

※ 환경현황조사항목에 대한 조사지점 및 필요횟수

구 분	조 사 항 목	지점수	횟 수	비 고
대 기 질	PM-10, SO2, NO2, CO, O3, Pb, 벤젠(총 7개 항목)	3지점	각 4회
지표수질	수온, pH, BOD, COD, SS, DO, T-N, T-P, 총대장균군, 분원성대장균군, Cd, As, CN, Hg, 유기인, PCB, Pb, Cr6+, ABS, 벤젠 (총 20개 항목)	3지점	각 4회
지하수질	pH, 대장균군수, 일반세균, NO3-N, Cl-, Cd, As, Hg, CN, Pb, 유기인, 페놀, Cr6+, TCE, PCE, 1.1.1-TCE, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌 (총 20개 항목)	3지점	각 4회
해양수질	수온, 염분, pH, COD, TOC, DO, SS(SPM), 대장균군수, T-N, T-P, NH3-N, NO2-N, NO3-N, PO4-P, Cr+6, As, Cd, Pb, Zn, Cu, Hg, CN, 유기인, PCB, 용매추출유분, 벤젠, 페놀, ABS (총 28개항목)	7지점 × 층별 (표층, 저층)	각 4회
해양저질	입도, 함수율, 강열감량, AVS, COD, TOC As, Cd, Pb, Zn, Cu, CN, Hg, Al, Fe, Cr, Ni, PCB, 유기인, Co, PAHs (총 21개항목)	7지점	각 4회
해양생태계	동․식물플랑크톤, 조하대저서생물, 어란 및 치자어, 조간대부착동물, 해산어류	7지점	각 4회
소음․진동	소음도(주간 4회, 야간 2회)	3지점	각 4회
	진동레벨(주간 2회, 야간 1회)	3지점	각 4회
지형ㆍ지질	해안선 조사	-	1회

(4) 본 과업수행을 위하여 환경영향평가법, 환경영향평가서 작성 등에 관한 규정 및 항목별 관련법령, 관련 환경기준 및 작성지침을 충분히 검토하여야 한다.

(5) 평가서초안 제출에 따른 주민의견수렴, 설명회 또는 공청회 개최 및 관계기관과의 협의에 필요한 자료 등을 작성 제출하여야 하며, 또한 평가완료 후 지방환경청 등 관계기관의 자료 요구시 이에 협조하여야 한다.

(6) 본 사업지구에 대한 환경영향평가서의 작성은 환경영향평가서 작성 등에 관한 규정(환경부 고시 2009-269호)에 의거 작성하여야 한다.

(7) 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 환경영향평가법 등 관련법령의 규정 등에 의하여 필요하다고 인정하는 사항이나 발주청이 지시하는 사항에 대하여는 과업을 수행하여야 한다.

(8) 본 개발사업으로 인하여 직ㆍ간접적으로 영향을 받게 될 대기환경, 수환경, 토지환경, 자연생태환경, 생활환경, 사회⋅경제환경 등 전반적인 환경에 미치는 영향을 도출하여 환경보전대책을 수립할 수 있는 자료가 되도록 하여야 한다.

(9) 평가서초안 작성시 예측ㆍ평가한 환경의 질이 주민의 생활환경 및 재산에 미치는 영향에 대하여는 일반인이 이해하기 용이하도록 저감대책의 시행전후로 구분하여 환경기준 및 기타 평가의 척도가 될 수 있는 자료 등과 비교 분석하여야 한다.

(10) 항목별 예측ㆍ평가 및 저감방안에서 기재된 저감방안에 대하여 사업시행에 따른 저감방안을 총괄적으로 파악할 수 있도록 항목별로 정리하여야 한다.

(11) 사업의 시행에 따라 환경에 영향을 미칠 것으로 예상되는 사항 중 그 저감이 현실적으로 곤란한 사항에 대하여는 항목별로 구분하여 분석ㆍ기재하여야 한다.

3.2 세부과업내용

(1) 환경영향평가계획서의 작성

가) 사업의 목적 및 개요를 작성한다.

나) 지역개황(대상사업이 실시되는 지역 및 그 주변지역에 대한 환경현황) 파악한다.

다) 환경영향평가 대상지역을 설정한다.

라) 평가항목 및 범위등을 설정한다.

마) 주민 등에 대한 의견수렴계획을 작성한다.

(2) 환경영향평가의 기본방향

가) 사업의 배경, 목적, 추진경위, 내용 및 기대효과 등을 검토한다.

나) 사업단계별 환경에 미치는 영향을 파악한다.

다) 평가항목은 대기환경, 수환경, 토지환경, 자연생태환경, 생활환경, 사회⋅경제환경에 있어서의 환경영향요인 및 지역적 특성을 감안, 세분하여 항목을 설정한다.

라) 환경영향 요소와 환경인자와의 상관관계를 모든 환경요소와 환경인자간의 관계가 총괄적으로 포함되도록 영향의 크기 및 중요도 등을 숫자, 부호 등을 사용하여 행렬식 대조표로 작성한다.

마) 사업 실시에 따른 영향을 예측하고 평가하는 데에 필요한 자료로서 적절한 범위에 걸친 적합하고 객관성 있는 자료를 얻을 수 있도록 계획을 수립한다.

(3) 환경현황조사 및 분석

가) 사업시행 지역과 사업시행에 따라 영향을 받을 지역의 대기환경, 수환경, 토지환경, 자연생태환경, 생활환경, 사회⋅경제환경을 조사ㆍ분석하여 지도, 사진, 도표 등을 사용하여 적절히 기술하고, 사업시행에 따라 현저하게 영향을 받을 분야에 중점을 두고 기술하며 중요하지 아니한 자료의 나열은 피한다.

나) 주요 항목별 현황조사 개요는 다음과 같으며, 관계기관 검토 또는 협의 과정에서 조사방법의 변경 또는 추가조사가 필요한 경우 발주자의 승인후 조사계획을 수립하여 시행하고 본 과업지시서에 제시되지 않은 사항은 환경영향평가서 작성규정을 준수한다.

① 대기질

- 환경정책기본법에서 정하고 있는 환경기준 항목에 대해 대기오염공정시험방법에 준하여 조사를 실시

- 조사주기는 계절별 조사를 원칙으로 하며, 조사지역은 주변의 대기질 현황을 대표할 수 있도록 고려

② 해양환경

- 조석, 조류 등의 해양물리 조사 및 해양수치모델링을 실시하여 사업시행에 따른 영향 예측, 기본계획 및 실시계획 자료 사용

• 연속조류관측(15일 1정점) ; 층별조류관측(25시간, 2정점), 조석관측(30일, 1정점), 층별부유사(13시간)

• 해수유동실험, 침퇴적모형실험 ; 부유사 확산실험

- 해양수질은 환경정책기본법에서 정하고 있는 환경기준 항목을 중심으로 해양환경공정시험기준에 준하여 조사를 실시

- 해양수질 항목의 조사주기는 계절별 조사를 원칙으로 하며, 조사정점은 해역의 현황을 대표할 수 있도록 수평적 간격을 배치하고 수직적으로는 표층 및 저층에서 시료를 채취, 분석

- 해양저질은 해역의 퇴적물 오염도 분석이 가능하도록 조사항목을 선정하고 해양환경공정시험기준 등 공인된 시험법을 준수하고 계절별 조사를 원칙으로 하며, 해양수질의 조사위치를 고려하여 선정

③ 해양동ㆍ식물상

- 사업지역 인근 해역의 해양동․식물상의 현황을 대표할 수 있도록 동ㆍ식물플랑크톤(표층, 저층), 저서생물, 기초생산력, 어란 및 자치어, 조간대생물(해조류 포함), 해산어류(문헌 및 탐문조사) 등에 대한 분포상황을 공인된 시험방법에 의거 조사

- 조사주기는 계절별 조사를 원칙으로 하되, 조하대의 조사정점은 해양환경 항목의 조사위치와 환경적 연관성을 감안하고 조간대 조사정점은 현장조사 결과를 토대로 생물상을 대표할 수 있도록 선정

④ 소음ㆍ진동

- 사업지구 주변의 정온시설 분포상황을 조사한 후, 당해 사업으로 인한 소음․진동 영향권을 고려하여 소음․진동공정시험기준을 준수하여 측정

- 조사주기는 계절별 조사를 원칙으로 하되, 측정당시 주변의 소음원 및 진동원을 기록하여 분석, 평가

⑤ 위락ㆍ경관

- 사업지구 주변 위락ㆍ경관에 대한 현황 조사 실시

- 경관시뮬레이션 분석을 통하여 개발 후 경관변화를 시각적으로 판단할 수 있는 자료제시

(4) 사업시행으로 인한 환경에의 영향예측 및 평가

가) 환경에 미칠 모든 영향(직접ㆍ간접적 영향, 단기ㆍ장기적 영향, 긍ㆍ부정적인 영향)요인 및 제반 문제점을 항목별로 세밀히 검토 평가한다.

나) 평가내용의 표현방법은 가능한 정량적이며 기술적으로 표현하여야 하며, 환경항목별 환경영향의 예측 및 평가에 필요한 사항은 환경보존 및 관계규정에 따르며 이에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 관계기관의 해석에 따른다.

다) 환경영향평가결과 예측된 환경상의 영향에 대하여 환경영향요소와 환경인자와의 상관관계를 영향의 크기 및 중요도 등을 숫자 또는 부호 등을 사용하여 적절히 표시한다.

(5) 환경에 미칠 악영향의 저감방안 수립, 불가피한 환경에의 악영향 분석 및 평가

가) 예측된 영향중 악영향을 도출하고 저감시키기 위한 적절한 저감방안을 강구하여야 하며, 장기적인 환경보전대책을 수립하여 제시하여야 한다.

나) 저감시킬 수 없는 불가피한 환경에의 영향 정도, 중요성 등을 분석ㆍ제시한다.

(6) 대안의 설정 및 사후환경관리 계획의 수립

가) 사업계획에서 선정한 대안을 고찰하여 제시하고 각 안에 대한 환경적 영향, 효과 및 상호 장ㆍ단점을 비교 검토하고 결과를 제시한다.

나) 환경영향평가 결과 예견되는 영향중 환경보전상 문제가 있거나 있을 것으로 판단되는 영향에 대하여는 건설기간내 동 영향의 발생여부 및 발생과정을 조사ㆍ확인하고 대처하기 위한 사후환경관리계획을 수립하여 제시하여야 한다.

다) 사후환경관리 계획에는 환경시설물의 효과적 운영관리방안 및 유지보수계획 등이 포함되도록 하여야 한다.

(7) 종합평가 및 결론

위 각항에서 조사, 평가된 결과를 종합 정리하여 평가 및 결론을 내린다.

(8) 환경영향평가서초안 작성

보고서는 위 각항에서 조사 평가된 내용과 결과를 종합 정리하여 환경영향평가서 초안을 작성하고 주민공람 및 설명회, 공청회(필요시) 등을 통하여 주민의견을 수렴하고 이를 반영한 최종보고서를 작성, 제출하되 관계자료 등을 필요시 부록에 수록하여야 한다.

(9) 주민설명회, 공청회용 자료작성

사업개요와 사업시행시 예상되는 각종 영향 등을 관계주민에게 알리고 영향권 내 주민의 의견수렴을 위한 설명회, 공청회(필요시) 개최시 필요한 각종 자료를 작성하고 제공토록 하여야 한다.

4. 성과물 제출

수급인은 과업수행 과정중에 생산된 각종 조사, 연구, 검토결과를 정리하여 용역보고서를 작성 제출하여야 한다.

① 환경영향평가계획서 : 1식

② 환경영향평가서초안 : 1식

③ 환경영향평가서 : 1식(추가자료 또는 보완 포함)

④ 관련 보고서 등의 CD : 1식

⑤ 조사시기별 측정자료 및 조사보고서: 1식

예  정  공  정  표

구 분	과 업 수 행 기 간
	제1월	제2월	제3월	제4월	제5월	제6월	제7월	제8월	제9월	제10월	제11월	제12월
환 경 영 향 평 가
1. 평가계획서 작성․심의
2. 환경현황조사
3. 초안보고서 작성
4. 주민의견수렴
5. 최종보고서 작성

□ 도 면