2011년도

포항영일만항 주변 해안선변화 조사용역 과업지시서

포항지방해양항만청

목  차

1. 과업 설명서

2. 일반 사항

3. 세부 과업 수행 지침

4. 성과물 제출

5. 예정 공정표

6. 산출 내역서

7. 일위 대가표

1. 과업 설명서

1.1 과업의 목적

◦ 영일만내 주요 해빈에 대한 기존 조사 자료를 수집․분석

◦ 영일만항의 건설 단계별 주요 해수욕장의 해빈폭, 전면 수심 등의 변화를 모니터링하여 변화의 원인 분석

◦ 건설 단계별 및 완공 후 변화를 예측하여 현안 및 예측 결과에 대한 문제점 발견시 이에 따른 대책방안 검토

◦ 위의 내용을 종합 검토하여 영일만내 해수욕장 및 영일만항, 포항항 등의 원활한 활용을 위한 참고자료를 제공하는데 그 목적이 있음.

1.2 과업의 대상 위치

경북 포항시 영일만 일대

1.3 과업의 범위

1.3.1 기존자료 조사

∘ 영일만항 주변 해안선 변화관련 기존 보고서 및 연구결과를 수집․분석

1.3.2 현지조사

가. 해안선 및 해빈단면 측량

∘ 용한해수욕장                           2.5 km

∘ 죽천해수욕장                           1.5 km

∘ 북부해수욕장                           1.3 km

∘ 송도해수욕장                           2.0 km

∘ 도구해수욕장                           1.5 km

나. 수심측량

∘ 용한해수욕장                          1.87 km2 (50m pitch)

∘ 죽천해수욕장                          1.12 km2 (50m pitch)

∘ 북부해수욕장                          2.72 km2 (50m pitch)

∘ 송도해수욕장                          3.41 km2 (50m pitch)

∘ 도구해수욕장                          2.14 km2 (50m pitch)

다. 해안선변화 비디오 모니터링

∘ 비디오 모니터링 운용                  1개소 (북부해수욕장)

1.3.3 수치모형실험

∘ 해수유동 실험                         1식

∘ 파랑변형 실험                         1식

∘ 해빈류 실험                           1식

∘ 퇴적물이동 실험                       1식

∘ 해안선변화 실험                       1식

1.4 과업 기간

착수일로부터 6개월로 한다.

1.5 시행 방법

본 과업 내용서에 의거 도급으로 시행한다.

2. 일 반 사 항

2.1  과업의 수행기준

본 용역은 기 수립된 영일만 종합개발계획 검토 내용을 토대로 관계법령, 국토해양부 제반규정, 각종 시방서 및 지도서와 본 과업지시서에 의거 최신의 전문기술을 최대한 활용하여 과업을 성실히 수행하여야 하며, 본 용역 성과가 발주청에 최대 이익을 줄 수 있도록 하여야 한다.

2.2  용역기술자

가. 본 용역에 종사하는 기술자는 충분한 학식과 경험을 가진 자이어야 하며, 용역사는 용역 착수시 용역 참여기술자의 투입계획서(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)와 사업수행계획서를 작성 발주처에 제출하여 승인을 받은 후 기술자를 투입하여야 하며 실제 투입되는 기술자는 승인받은 참여기술자와 명단이 일치하여야 한다.

단, 사망, 질병, 기타 사유로 변경이 불가피할 경우는 교체자의 자격 및 경력에 대하여 발주처의 사전 승인을 득하여 교체하여야 하며, 본 용역에 투입된 참여기술자가 그 임무를 수행함에 있어 부당하다고 판단되거나 태만하다고 인정될 때는 교체를 요구할 수 있으며, 용역사는 이에 즉시 응해야 한다.

나. 건설기술관리법 관계규정에 의거 용역 참여기술자는 업무내용 등을 구체적으로 보고서에 기재하여야 한다.

2.3  단위

조사, 분석 및 제반검토 보고서 작성 등에 사용하는 단위는 C.G.S. 단위를 기준으로 한다.

2.4  용어의 해석

과업 내용서 상의 문구, 용어해석과 과업범위에 대하여 발주처와 의견을 달리할 경우는 발주청의 해석과 지시에 따른다.

2.5  하도급 시행

가. 도급자가 하도급을 시행할 경우 건설기술관리법의 관련규정을 준수하여야 하며, 하도급 계약에 관하여 발주청과 사전 협의하여야 한다.

나. 하도급에 의해 수행된 용역성과에 대해서도 원도급자가 발주청에 최종 책임을 진다.

2.6  공정보고

가. 도급자는 계약 일로부터 7일 이내에 세부계획에 의한 과업 수행방법 및 월별 예정공정표를 포함한 착수계를 제출하여야  한다.

나. 공정은 매월 말일 지정양식에 의거 감독관을 경유하여 보고하여야 한다.

다. 공정보고에는 반드시 과업 수행한 내용을 요약하고, 책임기술자 및 분야별 책임기술자가 서명 날인하여 제출하여야 한다.

2.7  성과품의 관리

용역수행으로 취득하거나 생산한 각종 조사자료와 원도 및 도면 등 일체의 성과품은 발주청의 소유로 하고, 발주청의 사전 승인 없이는 제3자에게 제공 또는 외부에 발표하는 등 본 용역 목적 이외에 사용할 수 없으며, 준공시 발주청에 정리‧제출하여야 한다.

2.8  과업의 변경

가. 본 과업 수행 중 과업량의 증감이 발생하는 경우

나. 발주청의 필요에 따라 과업의 범위가 변경될 때

2.9  특허권의 사용

본 용역 수행에 있어 제3자의 권리대상으로 되어있는 특허권을 사용할 때는 도급자는 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

2.10 과업 수행 성과보고

가. 도급자는 1회이상의 중간보고와 최종보고회를 하여야 하며, 보고회수 및 보고시기는 감독자와 협의하여 결정하여야 한다.

나. 도급자는 발주처에서 필요하다고 판단하여 보고를 지시하는 경우, 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

다. 도급자는 보고회의시 검토 성과를 상세히 제시하여야 하며, 지적된 사항에 대해서는 빠른 시일 내에 보완하고 조치 결과는 별도 서면 보고하여야 한다.

2.11 성과품의 인쇄

가. 과업지시서에 의한 모든 성과품의 원고가 작성되면 승인을 득한 후 초판에 임한다.

나. 성과품의 편집․인쇄 방법 등은 감독관과 사전 협의하여야 한다.

2.12 사진첩 작성

현지조사 및 사후 증빙자료로 이용될 내용 등 용역 관련 주요사항을 사진 촬영하여 사진첩(1부)를 용역 완료시 제출하여야 한다.

2.13 과업 책임 및 보완에 대한 의무 이행

가. 모든 용역성과에 대해서는 발주청과 사전 승인 협의를 거친 사항이라도 하자 발생 시에는 용역사가 전적인 책임을 진다.

나. 본 과업 완료 후라도 본 용역에 관련된 사항에 대하여 도급자의 귀책에 의하여 재검토 또는 보완이 필요할 때에는 별도의 용역비 청구 없이 재검토 보완하여 제출하여야 한다.

2.14 위반 사항에 대한 조치

다음과 같은 행위가 발생하였을 때는 과업 수행 상 특별한 사유가 없는 한 계약위반 행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

가. 제반 지시사항을 기한 내에 이행치 않을 때

나. 계약기간 내에 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

다. 과업 수행 중 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

라. 과업의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 때

2.15 기타 사항

가. 본 용역과업의 수행 상 지득한 세부 개발계획, 각종 조사자료, 도면, 설계내역 등의 자료를 대외로 유출시켜 부정한 수단으로 이용되어 사회에 물의를 일으키는 경우가 없도록 하여야 하며, 이에 관련되는 사항은 전반적인 책임을 지고 보안관리에 철저를 기하여야 한다.

나. 불가피한 사유로 과업량의 변동이 발생할 경우 물량증감 분에 대하여는 예산범위 내에서 정산조치하고 경미한 사항에 대하 여는 추가 용역비 청구 없이 도급자 부담으로 시행하여야 한다.

다. 용역사는 본 용역업무 수행과정에서 타 기관과의 협의사항에 대해서는 타 기관의 제반법규 및 규정에 저촉되지 않도록 당해 기관과 긴밀히 협의하여 용역을 수행하여야 한다.

라. 용역 최종보고서 내용에는 금회 조사결과 및 기존 타 용역 또는 문헌에 의한 기초자료를 종합검토하여 수치모형실험의 결과와 비교․ 검토하여야 한다.

3. 세부 과업 수행 지침

3.1 세부과업 수행 내용 및 목적

항 목		내 용	조사 시기	목 적
해안선 및 해빈단면 측량		• 용한해수욕장 2.5 km × 1회 • 죽천해수욕장 1.5 km × 1회 • 북부해수욕장 1.3 km × 1회 • 송도해수욕장 2.0 km × 1회 • 도구해수욕장 1.5 km × 1회	• 2011년 추계	• 각 해수욕장의 해안선 및 해빈의 변화 파악
수심측량		• 용한해수욕장 1.87 km2 (50 m pitch) • 죽천해수욕장 1.12 km2 (50 m pitch) • 북부해수욕장 2.72 km2 (50 m pitch) • 송도해수욕장 3.41 km2 (50 m pitch) • 도구해수욕장 2.14 km2 (50 m pitch)	• 2011년 추계	• 각 해수욕장의 수심변화 파악
해안선변화 비디오 모니터링		• 1개소 운용	• 2011년 7 ∼ 12월	• 장기적인 해안선변화 양상파악 • 해안선변화 원인분석의 기초자료로 활용
수치실험	해수유동 실험	• 1식	-	• 대상해역의 해조류특성 파악 • 퇴적물이동 실험의 기초자료로 활용
	파랑변형 실험	• 1식	-	• 대상해역의 파랑특성 파악 • 해빈류, 퇴적물이동 및 해안선 변형 실험의 입력자료로 활용
	해빈류 실험	• 1식	-	• 대상해역의 해빈류 특성 파악
	퇴적물이동 실험	• 1식	-	• 대상해역의 해저지형변화 검토
	해안선변형 실험	• 1식	-	• 대상해역의 해안선변형 양상 검토

3.2 현지 조사

3.2.1 해안선 및 해빈단면 측량

가. 조사내용

• 용한해수욕장 (2.5 km), 죽천해수욕장 (1.5 km), 북부해수욕장 (1.3 km), 송도해수욕장 (2.0 km), 도구해수욕장 (1.5 km)에서 해안선 및 해빈단면을 년 1회(추계) 관측한다.

나. 조사방법

• 측량범위는 약최고고조위(A.H.H.W.)와 기본수준면(DL)을 포함하는 해빈으로 한다.

• 해안선에 직각방향으로 50 m 간격으로 분할하여 해빈 배후지에서부터 기본수준면까지 단면측량을 수행한다. 단면상에서의 측량간격은 약 10 m 내외로 하되 지형의 변화가 급한 지역에서는 다소 조밀하게 측량한다.

• 단면측량과 해빈표고 측량자료로부터 해안선(Datum Level 기준) 및 해빈의 경사를 산정하여 제시하여야한다.

• 단면측량자료는 지속적으로 비교하여 변화양상을 파악해야 한다.

3.2.2  수심측량

가. 조사내용

• 용한해수욕장 (1,874,000 m2),  죽천해수욕장 (1,120,000 m2), 북부해수욕장 (2,716,000 m2), 송도해수욕장 (3,407,000 m2),

도구해수욕장 (2,138,000 m2)에서 추계에 수심 측량한다.

나. 조사방법

• 해상위치 결정은 전파측위, 위성측위 또는 광학적 측위방법으로 시행하여야 하며, 수평위치정도는 IHO 특등급(95% 신뢰수준, 2m)에 준해야 한다.

•  수심측량은 음향측심기의 사용을 원칙으로 하고 장애물이나 측량선의 진입이 곤란한 곳에서는 감독자와 협의하여 육상수준측량 또는 Lead 측량을 실시할 수 있다.

• 음측기록의 수심은 해저 표면의 최저 수심을 읽어야 한다. 해저에 부니층이 있는 경우도 그 부니층 표면의 수심 값을 채택하여야 한다.

• 측심간격은 50m로 하되 수심측량의 목적과 구조물의 중요도, 해저의 기복 및 종류 등에 따라 감독자와 협의하여 결정하여야 한다. 대상구조물의 위치 및 중요성에 따라 필요시 감독자와 협의하여 그 간격을 변경할 수 있다.

• 측심기의 음속보정은 바체크 방법으로 매일의 측심 전․후에 측심 해역의 최대 수심부에서 심도 32m까지는 2m 간격으로 그 이상에서는 5m 간격으로 실시한다.

• 측심치의 조위 경정은 원칙적으로 작업구역의 조위 관측치(기본수준면상)로 하되 부득이한 경우에는 인근 기준검조소의 조위 관측치를 개정하여 사용할 수 있다. 경정수심은 IHO 특등급의 오차범위(95% 신뢰수준, [eqn: sqrt{0.25^2 +(0.0075×수심)^2}]m) 이내이어야 한다.

• 측심작업은 가급적 정온한 날을 택하여 실시하여야 하며, 측심자료는 지속적으로 비교하여 변화양상을 파악한다.

3.2.3  해안선 변화 비디오 모니터링

가. 운영 (북부해수욕장)

• 구축된 비디오 모니터링 체계는 주기적인 점검을 수행하여 노후기기의 수리 및 교체를 적절한 시기에 실시하여야 한다.

• 기상 악화 및 통신장비의 수신문제 발생시 자료의 누락을 최소화하도록 신속히 대처한다.

• 관측된 영상의 해상도는 최소 640×480 이상의 해상도를 유지하며, 해안선 추출 소프트웨어를 사용하여 해안선을 추출해 낸다.

• 3차원 비디오 영상을 2차원 정사영상으로 변환한다.

• 해안선 모니터링 관측 동일기간의 조위자료를 고려하여, 일별, 월별, 특정 조위별 해안선, 해빈폭 및 면적변화 정보를 추출하고, 이를 토대로 해빈 및 해안선 변화 양상을 파악한다.

• 분석된 자료는 현장 관측된 해양조사 자료함께 분석하여 해빈변화양상 및 원인규명의 기초자료로 활용한다.

3.3  수치실험

가. 해수유동 실험

• 해수유동실험은 대상해역의 조류특성을 파악한다

• 해수유동모형은 당 해역과 유사한 해양특성을 갖는 지역에 적용된 바 있으며 선진기술 보유국에서 새로이 개발 또는 적용되고 있는 수치기법 및 이론의 적합성을 갖춘 3차원 모형이나 이에 상응하는 모형을 사용하도록 한다.

• 모형의 영역은 과업대상지역의 유동특성을 반영할 수 있는 적절한 범위로 설정한다.

• 모형의 격자망은 대상지역의 지형 및 구조물의 조건을 적절히 반영할 수 있도록 충분한 해상도를 갖는 격자로 구축한다.

• 모형의 해안선 및 해저지형은 가장 최근의 해도, 수심도 및 지형도 등을 이용해 입력한다.

• 실험조석조건은 대, 중, 소조기의 조류특성을 반영하기 위하여 최소한 주요 4대 분조를 고려한 조건으로 하며, 해류, 취송류를 동시에 고려한다.

• 모형의 검증은 과업대상지의 조석 및 조류 관측치와 실험치의 비교에 의해 수행하며, 비교방법은 조위곡선 및 유속 비교 등의 방법으로 검증한다. 해류 및 취송류에 의한 항류성분도 관측자료와 비교한다.

• 영일만항 개발에 따른 시공단계별 유동예측을 통하여 만내 구역별 유동 변화 특성을 제시한다.

• 실험결과는 향후 수행될 퇴적물이동 실험의 입력자료로 활용한다.

나. 파랑변형 실험

• 입력제원은 장기간에 걸친 통계자료 등을 통하여 결정하되 장기간 실측자료와 전해역 심해설계파 추정보고서Ⅱ(’05.12, KORDI) 및 장기파랑산출 자료(해양수산부) 등을 참고하여 상호 비교 검토하여야 한다.

• 모형은 지역적인 특성과 수치모델의 특징을 고려하여 적용한다.

• 모델범위는 대상해역을 포함하여 외해조건이 성립하는 곳까지 넓게 구성한다.

• 계산 격자망은 주관심 대상해역에 대하여 사용모형의 안정조건을 만족하고, 대상해역의 계산결과를 잘 재현하기 위해 고해상도로 구성한다.

• 최신의 해도, 수심도 및 지형도 등을 이용하여 해안선의 위치와 격자점의 수심을 모델에 재현한다.

• 영일만항 개발에 따른 시공단계별로 영일만 주변해역의 파랑변화를 예측하고, 실험결과는 향후 과업에 따른 해빈류 실험, 퇴적물이동 실험, 해안선변형 실험 등의 입력자료로 활용한다.

다. 해빈류 실험

• 입력제원은 파랑변형 실험의 결과와 관측자료를 상호 비교 검토하여 산정하여야 한다.

• 모형은 지역적인 특성과 수치모델의 특징을 고려하여 적용하여야 한다.

• 모델범위는 대상해역을 포함하여야 하며, 해빈류 특성을 충분히 재현할 수 있는 범위로 넓게 구성한다.

• 계산 격자망은 주관심 대상해역에 대하여 사용모형의 안정조건을 만족하고, 대상해역의 계산결과를 잘 재현하기 위해 고해상도로 구성한다.

• 최신의 해도, 수심도 및 지형도 등을 이용하여 해안선의 위치와 격자점의 수심을 모델에 재현해야 한다.

• 영일만항 개발에 따른 시공단계별로 영일만 주변해역 중에서 해안선 변화가 활발한 지역을 선정하여 해빈류 특성을 파악한다.

• 실험결과는 향후 과업에 따른 해안선변형 실험 등의 기초자료로 활용한다.

라. 퇴적물이동 실험

• 모델 범위는 해수유동 모델 범위와 동일하게 적용한다.

• 해수유동, 파랑 등에 의한 저면 전단응력의 효과를 고려한다.

• 퇴적물의 이류, 확산, 침강, 저면 침식(재부유), 소류사 이동 등이 고려될 수 있는 퇴적물 모델을 사용한다.

• 입력 및 외력조건은 조류, 파랑, 하천유량, 해류 등을 포함하여 연중 퇴적물이동을 일으키는 모든 조건을 포함한다.

• 영일만항 개발에 따른 퇴적양상의 변화를 검토한다.

마. 해안선변형 실험

• 입력제원은 장기간의 기존자료 및 측량자료를 사용하여 결정하되, 파랑변형 및 해빈류 실험 등과 상호 검토하여 결정하여야 한다.

• 모형은 지역적인 특성과 수치모델의 특징을 고려하여야 하며, 타 사업에서 적용한 적이 있는 신뢰성 있는 모형을 사용하여야 한다.

• 모델범위는 대상해역을 포함하여야 하며, 해안선 변형을 충분히 검토할 수 있는 범위로 넓게 구성한다.

• 계산 격자망은 주관심 대상해역에 대하여 사용모형의 안정조건을 만족하고, 대상해역의 계산결과를 잘 재현하기 위해 고해상도로 구성하여야 한다.

• 최신의 해도, 수심도 및 지형도 등을 이용하여 해안선의 위치와 격자점의 수심을 모델에 재현해야 한다.

• 영일만항 개발에 따른 단기 및 장기간 해안선변형을 검토하여야 한다.

3.4  종합분석

• 영일만의 해안지형 변화 모니터링

- 기존 및 금회 관측결과를 이용하여 용한해수욕장, 죽천해수욕장, 북부해수욕장, 송도해수욕장, 도구해수욕장의 장기 해안선 및    수심변화 평가

- 금회 관측된 수리현상의 결과를 분석하고 본 용역 및 기타 유사용역의 기존 성과와 함께 비교․검토

• 영일만내의 단계별 건설 및 완공에 따른 수리적 검토

- 북방파제, 남방파제 건설 및 영일만 신항 완공에 따른 수리적 변화를 검토하고 문제점 발생시 이에 따른 대책방안 제시

- 단계별 건설 및 완공에 따른 해수욕장별 해안선 변화를 검토하고 악영향 예측시 대책방안 제시

• 예상하지 못한 현안 문제 발생시 원인 분석 및 대책방안 수립

- 해수유동 및 파랑변형 실험 등의 모델을 지속적으로 검증․보완하여 예상하지 못한 수리적 문제점 발생시 신속하게 윈인 분석     및 대책방안 수립

4. 성과물 제출

가. 영일만 해빈변화 보고서	:  50부.

나. 기타

• 측량 도면 및 각종 성과품	:  1식.

• 사진첩	:  1부.

• 보고서 및 자료 일체 CD 제작	:  1부.

5. 예정 공정표

구 분	항 목	2011년
		1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	6개월
측 량	해안선 및 해빈단면 측량
	수심측량
비디오 모니터링	1개소 운영
수치모형 실험	해수유동 실험
	파랑변형 실험
	해빈류 실험
	퇴적물이동 실험
	해안선변형 실험
종합 분석 및 보고서 작성

l

현지조사

분석 및 실험

현지조사 위치도