2011년도

가거도항 태풍피해복구공사 실시설계용역 설계서

서 해 어 업 관 리 단

2011년 10월 설계	설계자	김인호	심사자	최재화	계장	김용원	과장	전충남
2011년도 가거도항 태풍피해복구공사 실시설계 용역 설계서 서 해 어 업 관 리 단

목      차

1. 과 업 지 시 서

2. 예 정 공 정 표

3. 설 계 예 산 서

4. 일  위  대  가

5. 단 가 산 출 서

6. 노임· 자재단가

1. 과 업 지 시 서

Ⅰ. 과업지시서

1. 과업의 개요

1.1 과업의 목적

◦ 2011년 8월 7일 제9호 태풍「무이파(MUIFA)」내습으로 피해가 발생한 가거도항 전 구간에 대하여 피해현황 조사분석, 현지조사, 수치모형 실험(설계파 실험 등), 기존 방파제 안전도 점검 등을 통해 향후 태풍 등 이상파고 발생시 피해 재발을 방지할 수 있도록 실시설계를 수행하는데 그 목적이 있음

1.2. 과업위치

◦ 가거도항 : 전라남도 신안군 흑산면 가거도리 가거도항 일원

1.3. 과업기간

◦ 착수일로부터 6개월간

1.4. 과업의 범위

가. 기초자료조사 및 현황분석 1식

나. 현지조사

1) 지형측량

2) 수심측량

3) 피해현황 및 제체 피복재 유용도 조사

4) 상치콘크리트 내구성 조사

다. 피해복구 계획수립

1) 설계조건 설정

2) 태풍피해 현황 및 태풍피해 원인 분석

3) 방파제 장기 개량복구 단면검토 및 실시설계 1식

4) 기존 방파제 안전도 점검 및 보강방안

5) 항내 월파 대책 및 수역관리방안 수립

6) 단계별 건설계획 및 투자계획

라. 수치모형실험

1) 설계파 실험 (빈도별 심해파추정, 무이파 재현, 천해설계파 도출)

2) 항내정온도 실험 : 현재, 단면개선시, 평면개선시 (필요시 수행)

3) 해수유동실험

4) 월파실험

5) 피복재별 중복파 실험

마. 수리모형실험

1) 단면 수리모형실험 (제간부, 제두부) : 제체안정성, 월파향, 월파고에 대한 실험

2) 평면 수리모형실험 (제두부) : 제체안정성, 피복재 안정성, 항내 회절파고에 대한 실험

바. 국내외 방파제 공법 또는 피해사례 및 피복재 조사 1식

사. 설계도서 및 보고서 작성

1) 실시설계 보고서 1식

2) 설계서 1식

2. 일반사항

2.1 과업수행의 기준

가. 용역과업 수행은 이 과업지시서와 이 과업지시서상의 2.4절 나. 과업수행계획서에 의하여 시행하여야 한다.

나. 수급인은 우선적으로 최신의 전문기술 지식을 활용하여야 하며, 용역성과가 발주청에 최대이익을 줄 수 있도록 과업을 수행하여야 한다.

다. 수급인은 이 과업의 수행결과에 따라 산출된 공사비가 설계누락 또는 과다계산이 되지 않도록 하여 공사 시공시 이로 인한

분쟁이 발생 되지 않도록 최대한 노력하여야한다.

2.2 각종 기술기준의 적용

가. 정부의 제반규정과 표준시방서, 설계기준 등 객관적이고 공신력 있는 국내의 기준을 적용하여 시행하여야하며, 외국의

기준 등을 이용하였을 때에는 발주처에서 알 수 있도록 그 인용부분 및 자료출처를 명확히 하여야한다.

나. 과업수행 중 사용되는 모든 자료는 그 출처를 밝혀 객관성이 확보되도록 하여야 한다.

2.3 공사비산정 적용기준

가.  노임단가 : 용역준공 기준년도의 대한건설협회 및 엔지니어링진흥협회, 대한측량협회 등에서 조사공표한 노임(이월시는          성과품 납품 당해 연도분 적용)

나.  환율 : 용역준공 기준년도의 전신환매도율 적용(이월시는 성과품 납품 당해 연도분 반영)

다.  중기사용료 : 용역준공 기준년도의 조달청 중기사용료

라.  자재단가 : 용역준공 기준년도 최근 조달청 가격정보지 또는 물가정보지 단가 적용

마.  수량 및 단가산출 : 정부제정 건설공사 표준품셈에 의하여 산출, 단 실적공사비 적용대상 공종 및 단가에 대하여는 실적        공사비에 의한 공사비를 산출하여 적용하며, 이에 의할 수 없을 경우는 적정단가를 발주처와 협의하여 산출

2.4 제출물

가.  과업수행조직표

1) 수급인은 과업에 참여할 사업책임기술자 및 분야별 책임기술자․참여기술자를 담당과업수행 분야별로 구분 작성하여 용역

착수후 7일이내에 책임기술자 선임계, 이력서, 자격증사본을 첨부하여 발주처에 제출하여야 한다.

2) 과업수행에 필요한 분야구분은 발주청과 협의하여야 하며 다음을 기준으로 한다.

① 항만 및 해안분야

② 구조분야

③ 토질․지질분야

④ 해양수치 시뮬레이션 분야

⑤ 해양수산분야

⑥ 기타 본 과업수행에 필요한 분야

나. 과업수행계획서

1) 수급인은 수행계획, 수행방법 등에 관하여 과업수행계획서를 작성, 착수후 10일 이내에 발주처에 제출하여야 한다.

2) 과업수행계획서는 과업 단계별로 구분하여 작성하고 단계별 주요 검토사항 및 인원투입 계획이 포함되어야 하며 공정

계획은 과업 착수전까지 감독자에게 제출하여야 한다.

다. 세부조사 시행계획서

1) 수급인은 이 과업지시서상의 규정한 각종 조사에 대하여 세부조사 시행계획서를 발주처에 제출하여야 한다.

2) 세부조사 시행계획서는 감독자와 협의하여 작성하여야 한다.

2.5 참여기술자

가. 사업책임기술자는 과업지시서에 명시된 업무와 계약조건을 충실히 이행하여야 하며, 모든 중요한 사항에 대하여 감독자와

협의하여야 한다.

나. 용역에 종사하는 기술자는 과업수행계획서에 일치되게 투입되어야한다. 단, 추가투입이나 사망, 지병, 기타사유로 교체가

불가피할 경우는 교체자의 자격 및 경력에 대하여 발주처의 사전승인을 득하여야 한다.

다. 참여기술자가 과업수행에 부적합하다고 판단하거나, 태만하다고 인정할 때에는 해당자의 교체를 요구할 수 있고 수급인은       이에 응하여야 하며, 이로 인한 용역과업의 지연이나 용역기간의 연장은 인정되지 않는다.

라. 건설기술관리법 관계규정에 의거 설계용역 참여기술자의 업무내용 등을 구체적으로 보고서에 기재하여야 한다.

2.6 과업지시서의 해석

과업지시서상의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 발주처와 수급인이 의견을 달리하는 경우는 신뢰를 가지고 최대한 서로 협의하여 결정하되 협의가 되지 않을 경우는 발주처의 해석에 따르는 것으로 한다.

2.7 과업추진에 대한 일반사항

가. 감독자가 수급인의 귀책사유로 과업수행이 지연된다고 판단하여 지시할 경우는 지시에 따라 지체없이 과업이 예정대로 추진      되도록 인력, 장비 등을 추가 투입하는 등의 필요한 조치를 취하여야 한다.

나. 이 과업지시서에 누락되었더라도 과업목적을 달성하기 위하여 당연히 필요한 사항은 감독자와 협의하여 수급인의 부담으로       시행하여야 한다.

2.8 과업수행결과에 대한 책임

가. 발주처와 협의를 거친 사항이라도 설계상의 잘못이 발견될 시에는 추가비용의 청구없이 수급인의 책임하에 수정․보완

되어야 한다.

나. 용역 수행결과의 잘못으로 인하여 중대한 재난이 발생하거나 설계잘못으로 인하여 발생되는 분쟁은 수급인이 책임을져야 한다.

2.9 하도급의 시행

가. 수급인이 하도급을 시행하고자 하는 경우에는 발주처와 협의하여 승인을 얻어야 하며 하도급 계약내용(제3항 참조)을 계약

체결일로부터 7일이내에 발주처에 제출하여야 한다. 또한, 승인을 받은 하도급계약 내용을 변경하고자 하는 경우에도 같다.

나. 과업을 수행함에 있어 필요한 경우 타 전문기관을 활용할 수 있으며, 이 경우 사전에 발주처의 승인을 득하여야 한다.

다. 발주처의 승인을 얻지 않아도 되는 하도급의 범위는 다음과 같으며, 이 경우에도 하도급계약내용은 계약체결일로부터 7일        이내에 발주처에 제출하여야 한다.

1) 지형 및 수심측량

2) 제도 및 도면작성 등

3) 수량내역서 작성 및 견적업무

라. 하도급의 승인요청을 하는 경우 또는 하도급계약내용 변경을 위하여 승인요청을 하는 경우에는 다음사항을 명백히 하여야 한다.

1) 계약건명

2) 계약금액

3) 하도급 부분 및 내역

4) 하수급인

5) 계약이행기간

6) 하도급사유(하수급인 및 기타 하도급조건 변경시에는 변경하는 사유)

7) 계약서 사본(계약체결 후 제출)

8) 기타 참고사항

마. 수급인은 하수급인으로 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자로 선정하여야 하며 법령의 규정에 의하여 면허 또는       허가 등을 보유한 자만이 용역을 할 수 있는 경우에는 해당면허 또는 허가 등의 자격요건을 구비한 자로 선정하여야 한다.

바. 수급인은 하도급부분에 대하여 기성고 지출이 되었을 때에는 지체없이 하수급인에게 대금을 지급하여야 한다.

사. 하도급에 의해 수행된 용역성과에 대해서도 발주처에 대한 책임은 수급인이 져야 한다.

2.10 위반행위에 대한 조처

가. 다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 계약위반 행위로 간주하여 계약해지 또는 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

1) 제반지시사항을 특별한 이유없이 기한내에 이행치 않을 때

2) 계약기간내에 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

3) 과업수행상 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

4) 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급 주었을 때

나. 발주처가 계약위반 행위로 간주하여 계약해지 등의 조치를 취하고자 할 때에는 조치전에 2회이상 수급인과 협의하여 과업의

성실한 수행을 요청하여야 한다.

2.11 보고사항

가. 공정보고

착수 개시일로부터 매월 말일 정기공정보고를 하여야 하며 보고양식은 감독자와 협의하여 정하도록 한다.

나. 중간보고 및 최종보고

1) 1회이상의 중간보고와 최종보고회를 실시하여야 하며, 보고시기 및 보고장소는 감독자와 협의하여 결정하여야 한다.

2) 감독자가 필요하다고 판단하여 보고회의를 개최토록 지시하는 경우 수급인은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

3) 수급인은 과업완료 최소 1개월 이전에 최종보고서(안)을 제출하여야 하며 발주처에서 수정 또는 보완을 요구하는 경우        그 내용을 검토하여 수정, 보완하여야 한다.

다. 설계자문 및 설계의 경제성 등 검토

1) 수급인은 최종보고 이전 설계자문을 받아야 하고, 자문위원회에 참석하여 설계내용을 설명하여야 하며,  자문결과 내용을 검토 보완 조치하고 그 결과를 발주처에 제출하여야 한다. 이 경우 자문내용에 이견이 있을 경우에는 수급인은 그 사유와 근거를 자문위원회에 제시하여 확인받아야 한다.

2) 발주처의 승인을 얻어야 할 조치계획은 그 내용을 설계에 반영하고 발주처의 확인을 받아야한다.

3) 건설기술관리법에 의한 설계의 경제성 등 검토대상 사업에 해당하는 경우, 설계VE 시행과정 중 필요한 제반사항에 대하여 협조하여 원활한 평가가 이루어지도록 하여야 한다.

2.12 관계기관 및 관련법규 협의

수급인은 본 용역업무의 수행과정에서 타 기관에 사전 허가/승인/협의 등을 받아야할 사항에 대하여 해당규정 및 목록, 이행절차서를 작성하여 감독자와 협의한 후 이행하여야하며, 타 기관과의 허가/승인/협의 지연 및 관계 제반법규 불이행 등으로 인하여 과업이 지연 또는 중단되는 일이 없도록 하여야 한다.

2.13 과업완료후의 보완요청 등

과업완료후라도 이 용역(발주설계포함)에 관련된 사항에 대하여 재검토 또는 보완이 필요하여 발주처의 요청이 있을 때에는 별도의 비용 청구없이 재검토 또는 보완하여 제출하여야 한다.

2.14 성과품의 소유

수급인은 용역수행으로 인하여 발생한 각종 개발 및 조사자료와 도면, 시방서, 견적서, 입찰서류 및 원도등 일체의 성과품을 발주처의 소유로 하고 발주처의 승인없이는 제3자에게 제공하거나 이 용역외의 목적에 사용할 수 없으며 준공시 발주처에 정리 제출하여야 한다.

2.15 보안대책

가. 본 과업을 위하여 수집된 자료 및 과업수행의 결과에 대하여 철저한 관리, 보안을 유지하여야 하며 특별히 보안유지를 위하여 중요

하다고 인정되는 서류와 자료 및 결과는 이의 누설, 분실, 도난을 방지하기 위하여 보안관리책임자를 지명하여 관리토록 하여야 한다.

나.  용역 참여인원에 대한 서약서를 발주청에 제출하고 보안교육등 보안조치를 강구토록 하며, 용역 참여인원의 변경시 과업 내용의       사전유출 방지와 인수인계를 철저히 하여야 한다.

2.16.  용역손해배상 공제

가. 건설기술관리법시행령 제 76조의 3제3항(2009.06.18)에 의하여 수급인은 설계용역 손해배상보험 또는 공제에 가입하고 용역을 완료하기 전까지       공제증서를 제출하여야 한다.

나. 보험료 또는 공제료는  “설계․감리 등 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령” 제2009-385호(2009.06.18)의 제9조에 의하여 산정하고 계약금액의      증감으로 인하여 증감된 공제가입금액은 정산하여야 한다. 다만 증감된 순계약금액이 당초보험 또는 공제가입금액의 100분의 10이내인 경우      에는 그러하지 아니한다.

2.17. 기타사항

가.  용역보고서외에 도시계획반영등과 같이 차후 이 용역과업에 의한 공사추진시 필요로 하는 자료가 있을 경우에는 별도로 작성      제출하여야 한다.

나. 본 용역수행에 있어 제3자의 권리대상으로 되어있는 특허권 등을 사용할 때에는 실적증빙 등을 확인 기술적, 경제적 타당성을      분석 첨부하고 수급인은 그 권리의 사용에 관하여 일체를 책임져야 한다.

다.  과업지시서에 의한 모든 성과품은 원고가 작성되면 발주처의 승인을 득한후 조판에 임하고 성과품의 편집, 인쇄방법등은 별도로      사전에 협의하여야 하며, 검토서, 계산서, 각 도면에는 책임기술자, 검토자, 작성자의 서명이 있어야 한다.

라.  현지조사 및 사후 증빙자료로 이용될 내용 등 용역관련 주요사항을 사진 촬영하여 사진첩 1부를 작성, 원판(필름) 또는 CD와

함께 용역 완료시 제출하여야 한다.

3. 과업의 세부사항

3.1 기초자료 조사 및 현황분석

가. 공통사항

1)  실시설계에 필요한 자연조건을 조사하되 기수행된 용역에서 조사된 내용 또는 가거도항에 대하여 관련된 적정자료가 있을때     에는 이를 이용한다. 자료 미비시는 인근 관측소의 기록일을 조사 · 분석하여 공학적 신뢰도를 확인할 수 있는 전문기관의        기술적 검토를 확인하여야 한다.

2) 자료조사는 관계기관의 통계자료를 사용하여 신뢰도를 높이되, 관계기관의 자료와 민간의 자료가 상이할 경우 이에 대한

원인 분석과 검증을 거쳐 감독관과 협의 사용하여야 한다.

나. 어항의 연혁조사

1) 항의 역사적인 변천 과정에 따른 어항의 발전과정을 기술한다.

2) 역사적인 사건 등을 조사하여  가거도항의 이미지 창출을 위한 기초자료로 사용한다.

다. 어항의 현황조사

1) 개     요

2) 어항시설 현황

① 기본시설에 대한 위치, 구조, 형식(준공도면 참조), 시공년도, 공사비, 피해현황 등에 대하여 구체적으로 조사한다.

② 기능시설 및 복지시설에 대한 위치, 규모, 소유자, 시공년도 등 제반사항에 대하여 조사한다.

3) 수산현황

① 수산인구 및 가구조사

② 지방어선 및 외래어선의 척수를 구분하여 연간, 톤급별, 업종별로 구분 표시하고 성어기 또는 악천후시 최대 및

평균집결 어선수와 이에 따른 현재와 장래의 이용추세를 검토 분석한다.

③ 어획량 및 어획고 조사

최근 5년간 주어종별 어획량 및 어획고를 조사하고 가거도항의 기능을 검토․분석한다.

④ 어장 및 어업권, 광업권 조사

⑤ 어항 구역내의 여타 이용 현황 및 문제점을 조사하여, 개선사항을 제시하고, 특히 물양장 어선이용 현황은 업종별, 지역별     특성 등을 면밀히 조사하여야 한다.

⑥ 자치단체, 수협(어촌계) 진행사업 및 추진 사업계획을 조사 후 시설 계획에 반영하여야한다.

라. 자연조건 조사

1) 지  세 : 해당 항에 대한 천연적인 지형을 설명하고 지질에 대하여 개략적으로 기술한다.

2) 기  상 : 기상청 및 기타 공공기관에서 조사한 자료(최소 과거 20년간)를 수집 분석한다.

① 바  람

㉠ 풍향별 발생횟수는 16방위에 대하여 분석 정리하고 전풍속에 대한 발생회수와 10m/sec 이상의 풍속에 대한 발생회수를     월별, 연별로 분류, 주풍향과 설계풍향 및 풍속지속시간 등을 조사기록한다.

㉡ 과거 해당항에 내습했던 태풍에 대하여 발생지역, 평균최대풍속, 방향지속시간 및 당시기압등을 상세히 기록한다.

㉢ 상기 자료에 대하여 관측기관, 장소 등을 명시한다.

㉣ 바람 및 태풍에 대한 자료는 확률분석을 실시하여야 하며, 분석방법은 감독관과 협의하여야 하며, 이 자료는 차후 어항에     설치될 육상기능시설의 설계자료로 사용될 수 있도록 정리되어야 한다.

② 강   우

연, 월, 일의 강우량 및 지속시간, 강도 등을 조사 기입하고 관측기관, 장소 등을 명시한다.

③ 기   온

연, 월별 최고 및 최저 평균기온을 기술하고 관측기관, 장소등을 명시한다.

④ 이상의 자료를 조사, 분석하여 연간, 월별작업가능일수 등 계획 및 실시설계에 필요한 자료를 제시하여야 한다.

3) 해  상

① 조   위

㉠ 국립해양조사원에서 관측된 자료를 수집 · 분석하여 기 조사된 조위와의 상관관계를 비교 검토하여 최고 · 최저,

평균수면을 조사 기록한다.

㉡ 채택된 수준면은 해당 항의 개발시 이용에 편리하도록 훼손되지 않는 지점에 설치기관과 기준면상의 표고 (육상

기준점, 해상기준점)를 m/m단위로 표시한 수준점표석을 설치하고, 그 위치를 측량원도에 표시하여야 한다.

㉢ 조위자료는 조위상승, 폭풍해일 등의 영향과 관련한 고극, 저극 조위를 조사하여 방재수위 및 구조물 안정성을             검토하여야 한다.

② 파   랑

㉠ 과거에 해당항 또는 인근에 발생했던 파고, 파향 등을 조사하고 조사기관, 관측방법, 일시 등을 상세히 기록한다.

㉡ 조사자료는 설계조건으로 제시되는 설계파고와 상호 비교되어야 하며, 자료가 상이할 경우 그 원인에

대한 분석이 실시되어야 한다.

㉢ 심해파는 한국해양연구원에서 2005년 12월 발표된 「전해역 심해파 추산보고서Ⅱ」를 심해설계파, 설계파고(천해파)는     「국가어항 외곽시설 안전성평가용역(2차)」에서 추정 제시한 자료를 활용하되 적정성여부를 재검토 후 사용하여야

한다

㉣ 설계파고(천해파) 추정 및 항내정온도 검토 등은 수치모형실험에 의하여 빈도별로 실시하고, 관측 파고는 최근 장기파랑     산출자료집(해양수산부, 1997.12이후 자료수집)를 참고로하여 산정한다.

마. 입지 및 경제적 여건 조사

1) 인문, 사회적 여건

사회, 경제적인 직․간접 세력권 인구, 행정구역, 교통, 관광, 통신 등에 대하여 기술한다.

2) 지리적 여건

위치에 따른 좌표, 수역의 이용상태등 천연적인 조건에 따른 항의 기능, 전망 등에 대하여 기술한다.

3) 인접지역의 관련사업 현황 및 전망

어업세력권내 인구별, 업종별 산업의 현황을 분류하여 검토하고 전망을 예측한다.

바. 기 타 조 사

1) 항의 특성에 따른 계획의 특징, 성격 등을 조사 기술한다.

2) 시설계획수립 및 사업수행에 필요한 제반사항을 조사한다.

3) 공사용 재료의 조달방법, 현황 및 보상물건을 상세히 조사 기술한다.

4) 공사용 해상장비 및 육상장비를 조사 공법 검토시 유용가능여부를 조사한다.

5) 기타 기관 또는 단체의 개발계획을 조사한다.

6) 관할 지방자치단체 및 주민의 의견을 수렴한다.

3.2 현지조사

가. 공통사항

1)  기 수행된 관련 용역 및 최근 조사된 자료를 검토하여 실시설계보고서에 수록하여야 하며, 실시설계에 필요한 현지조사시     이를 최대한 이용하여야 한다. 또한 조사위치와 범위, 방법, 사용장비, 조사반 구성 등 조사에 필요한 구체적인 내용을 포함한     세부조사시행계획서를 발주처에 제출하여 승인을 얻은 후 시행하여야 한다.

2)  세부조사시행계획서를 제출하여 승인을 득하여야 하는 조사는 수심 및 지형측량, 피복재 유용도조사, 상치콘크리트 내구성     조사이며 기타 과업수행상 필요한 조사가 있어 발주처가 지시하는 경우에도 세부조사시행계획서를 제출하여야 한다.

3)  현지조사는 관련 표준시방서가 있을 경우 원칙적으로 이에 따라야 하며 세부조사시행계획서 수립시 그 내용을 반영하여야 한다.

나.  수심측량

1) 수심측량은 기수행된 관련용역에서 조사된 내용이 있을 경우에는 검토하여 이를 최대한 이용하여 경제적이고 효율적으로     실시하여야 하며 검토내용을 보고서에 수록하여야 한다.  또한 계획대상지역이나 그 인근지역에 대한 수심측량 자료가 있을      경우에는 이를 비교 활용하여야 한다.

2) 측량은 음향측심기에 의하고 측량선의 위치는 인공위성 측위보정방법(GPS)을 사용하여야 한다.

단, 측량선의 접근이 불가능한 해안 암초지대나 절벽 근접지, 간사지 등은 레드측량이나 육상측량 등의 방법으로 보완하여야 한다.

3) 수심측량은 수치모형실험, 파고추정 등을 감안 충분한 수면까지 조사하여야 한다.

4) 실시설계는 주요공법과 표준단면, 세부계획 등을 설계하기 위한 과업이므로 측심간격은 20m이내로 하되 수심측량의 목적과     구조물 설계의 중요도, 해저의 기복 및 종류, 대상구조물의 위치 및 중요성에 따라 필요시 발주처와 협의하여 축적과 측심     간격을 결정 또는 변경할 수 있다.

5) 수심측량은 발주처에 제출한 세부조사시행계획서에 따라야 하며 과업의 증감이 있을때에는 감독자와 협의하여 예산의 범위     내에서 정산할 수 있다.

다. 지 형 측 량

1) 어항구역의 해안을 따라 지형측량을 실시하되 기존의 성과를 수집하여 편수한다.

2) 시설계획에 필요한 어항구역부근을 포함하여 측량한다.

3) 만조위선에서 육지부로 50M이상까지 측량을 실시하여야 한다.

4) 구조물의 설치 및 확인을 위한 기준점 표석(2개 이상)은 측량하기 쉽고 절대 훼손되지 않는 장소에 견고하게 설치하고 측량원도에     표시(육상기준점 및 해상기준점 동시표기)를 하여야 하며, 기준점 매설은 발주처 담당자 입회하에 그 위치 및 설치규격 등을     협의하여 매설한다.

① 수준점의 표석 재질은 진유원판(동판)을 사용하여야 하며, 각 수준점의 상세위치도를 작도하고 여백에 방위를 표기한다.

② 위치평면도상에 수준점을 표시하여야하며, 기본 수준면상의 표고는 m/m 단위까지 표시한다.

③ 좌표는 위,경위도 및 직각 좌표(X·Y)을 동시 표기 한다.

5) 축척은 1/1,000을 원칙으로 하나 지형의 여건을 고려하여 조정할 수 있다.

6) 지적도를 확인하여 지형도에 경계선을 표시하고, 지적부합 여부 등을 조사하여야 한다.

라. 피복재 유용도 조사

◦ 피복제유용도 조사는 태풍무이파 내습으로 방파제 단면의 각종 피복제(TTP, CUBE, BLOCK, TRIPOD 등) 가 제내외측으로

유실되는 피해가 발생됨에 따라 각종 수중조사를 방파제 연장별10m 간격으로 시행하여 유실된 피복재의 존재유무를 확인

하고 인양 가능수량, 파손상태,건실도 등을 파악하여 방파제 피해복구 공사에 최대한 재활용 하도록 설계에 반영하여야 한다.

◦ 피복재 유용도 조사구역은 수심측량 범위와 동일하며 추가조사 범위가 필요하다고 판단될시는 발주처와 협의하여 조정할 수 있다.

◦ 피복재 수중 유용도조사로 지층탐사, 해저면영상조사, 지자기조사 및 잠수조사가 있으며 해저면에 존재할 것으로 예상되는 피복재의 존재유무 및 훼손상태를 파악하여야 한다.

1) 지층탐사

① 지층탐사는 송수파기를 측량선에 직접 부착할 수 있는 양현 직접 부착식을 사용한다.

② 지층탐사기의 음파속도는 1,500m/s로 가정한다.

③ 출력주파수는 1∼9khz의 SP-Ⅲ를 사용한다.

④ 기록분석은 퇴적층내의 밀도(기록농도)차가 큰 이상 물체의 유무를 확인하고, 또한 기반암반층(고형층)도를 작성하여 설계     기초자료로서 제공한다.

⑤ 이상 기록이 나타나는 곳은 지자기 탐사기록과 대비, 통합 분석한다.

2) 해저면 영상 조사

① 해저지층탐사시 측량선에 Sidescan Sonar를 설치하여 해저면의 지형을 연속적으로 획득한다.

② 105Hz를 기본주파수로 하며, 이상 물체 분포지역에서는 500Hz의 고해상 해저면 영상자료를 획득한다.

③ 수심의 기복이 심하거나 상대적으로 깊은 곳에서는 적절한 예인방식을 선택한다.

④ 해저기록의 선명도와 해상도가 탐사 목적에 맞는 최상의 상태를 유지하도록 하여 정밀 분석한다.

3) 지자기 조사

① 지자기 조사에는 정밀도가 높고 분극시간이 짧은 자력계(magneto meter)를 사용한다.

② 정밀한 조사를 위해 자력의 영향을 최소화 할 수 있는 목선을 이용한다.

③ 해상상태가 좋은 경우 퇴적층내 매몰되는 이상 물체의 확인을 위해 가능한 센서를 최대한 해저 가까이에 투입하여 조사한다.

④ 지자기 조사를 실시, 이상 물체를 확인시 위치 등을 표시한 후 지층탐사 도면과 상호대비를 통해 이상 물체를 재확인한다.

4) 잠수조사

각종 탐사자료(지층탐사, 해저면 영상 조사 및 지자기 조사) 성과를 분석하여 이상 물체 존재가 의심되는 지역에 하여

잠수부를 투입, 유실된 피복재의 존재 여부를 확인한다.

마. 상치콘크리트 내구성 조사

◦ 태풍 무이파 내습으로 파손 또는 균열이 발생한 기존 상치콘크리트에 대한 태풍피해복구 및 보강 계획에 활용하고자 상치     콘크리트 내구성 조사를 10m간격으로 시행하여 설계에 반영하여야 한다.

◦ 상부공에 대한 점검 항목으로는 크게 외형형상과 재료상태로 구별하며 외형형상 조사 점검 사항으로는

① 평면형상의 변화

② 신축(시공)이음줄의 활동 및 벌어짐

③ 모서리파손 등을 조사하여야 한다.

◦ 재료상태에 따른 조사 점검사항으로는 다음과 같은 항목을 조사 시행하여야 한다.

① 콘크리트의 수밀성 및 강도

② 콘크리트의 변색, 백확, 열화

③ 콘크리트의 염해유무

바. 재료원 조사

1)  기수행된 용역에서 조사된 토취장에 대한 제반조건 및 이용여부를 검토하여 발주처와 협의후 설계 및 시공시 이용할 토취장을     선정하여야 한다.

2)  기수행된 용역시 검토된 골재원의 위치, 매장량, 골재종류 등을 검토하여 설계 및 공사시행시 이용할 골재원을 발주처와      협의후 선정하여야 한다.

3)  기수행된 용역시 검토된 계획구역 주변의 석산 위치 및 암석의 종류, 암질상태, 표토층의 두께, 품질, 가용매장량을 분석하여     설계 및 공사시행시 이용할 석산을 발주처와 협의후 선정하여야 한다.

4)  콘크리트 구조물은 발주처와 협의후 고내구성 해양콘크리트를 우선적으로 사용할 수 있도록 하고 사용결정시에는 이의 제조     방법, 공법 및 품질확보 여건 등을 조사하여 이용 가능한 콘크리트 배치 프랜트 공장을 선정하여야 한다.

5)  기타 공사시행을 위하여 필요하다고 인정되거나 발주처의 지시가 있을 경우는 이에 대하여 조사하여야 한다.

사. 용지 및 보상물 조사

1)  과업대상지구내의 용지 및 기타 보상물 현황을 조사하고 보상이 필요시에는 소요비용을 예측하고 보상조서를 작성하여야     하며 어업권 보상은 현황만 조사하고 보상 소요비용은 제외토록 한다.

2) 용지 및 보상물 조사는 감독자와 사전협의하여 시행하여야 한다.

아. 지장물 및 지하매설물 조사

1) 계획대상지역의 지장물 및 지하매설물을 조사하여야 하며, 이설이 필요한 경우에는 이설 방안을 강구하여야 한다.

2) 조사항목은 다음과 같다.

① 공공시설물

② 전기 및 통신시설물

③ 가스, 송유관, 해수인입 등

④ 상하수도시설물 및 기존 구조물

⑤ 기타 시설물

자. 공사용 작업장 조사

본 공사 시행을 위한 작업장(적출장,  각종 블록 제작장 등) 소요규모를 판단하고, 기 조성된 배후부지의 작업장 이용 가능여부를  조사하고 필요시 신규 작업장 조성규모를 산정하여야 한다.

차. 어업권 현황조사

1) 과업대상지구 내의 어업권 현황을 개략적으로 조사하고 어업권 피해가 있을 경우, 어업피해범위와 그 정도를 조사하여 합리적이고 정당한      보상액 산정을 위한 기본자료를 제공함을 목적으로 하며, 조사범위는 어업피해가 발생될 수 있는 모든해역으로 한다.

2) 보상조서 작성을 위한 기초자료 조사는 세부조사계획을 수립하여 발주처의 승인을 얻어 시행하여야 한다.

3) 어업권 보상을 위해 어업권에 대한 물건조사와 피해범위, 피해율 등 어업권에 대한 감정평가 의뢰를 위하여 필요한 보상조서를     작성하여야 한다.

3.4. 수치모형실험

가. 파랑변형 실험(설계파)

1)  금회 태풍 무의파에 대한 심해파 추정은 모델선정 및 추산결과에 대해 공공관측자료와 비교 검증되어야 하며, 설계조건으로     사용되는 설계파고와 상호 비교되어야 하며, 자료가 상이할 경우, 그 원인에 대한 분석이 실시되어야 한다. 이 결과로부터 가거도항     방파제 피해원인 분석을 시행하여야 한다.

2)  심해설계파, 설계파고(천해파)는 「국가어항 외곽시설 안전성평가용역(2차)」에서 추정 제시한 자료를 활용하되, 수급자는      전해역 심해설계파 전해역 심해설계파 추정보고서Ⅱ(’05.12, KORDI) 및 장기파랑산출자료(구 해양수산부) 등을 근거로 적정성     여부를 재검토 후 사용하여야 한다.

3) 모형은 지역적인 특성과 수치모형의 특징을 고려하여 적용한다.

4) 모델범위는 대상해역을 포함하여 외해조건이 성립하는 곳까지 넓게 구성한다.

5) 계산 격자망은 주관심 대상해역에 대하여 사용모형의 안정조건을 만족하고, 대상해역의 계산결과를 잘 재현하기 위해

고해상도로 구성한다.

6) 최신의 해도, 수심도 및 지형도 등을 이용하여 해안선의 위치와 격자점의 수심을 모델에 재현한다.

나. 항내 정온도 실험

1) 광역 파랑변형 수치모형 실험은 항의 전면의 심해역을 포함한 광역의 범위를 설정하여야 한다.

2)  상세역 파랑변형 수치모형 실험은 파의 회절, 굴절, 쇄파, 흐름간섭효과, 반사등의 영향을 고려할 수 있는 모델을 사용하여야 한다.

3)  실험영역 설정시 입사경계와 측면경계에서 급격한 파랑변형이 발생하지 않도록 주기 및 지형에 맞도록 충분히 고려하여야 한다.

4)  입사파랑의 제원은 설계파랑과 이상파랑, 평상파랑으로 구분하여 이용하여야 한다.

5) 광역 및 상세역 실험을 수행하여 가능한 격자범위 내에서 최소격자로 구성하여 실험을 수행하여야 한다.

6) 구조물 형식에 따른 반사, 투과 등을 재현 가능하도록 하여야 한다.

다. 해수유동 실험

1) 해수유동실험은 대상해역의 조류특성을 파악한다

2) 해수유동모형은 당 해역과 유사한 해양특성을 갖는 지역에 적용된 바 있으며 선진기술 보유국에서 새로이 개발 또는  적용되고     있는 수치기법 및 이론의 적합성을 갖춘 2차원 연직적분 모형이나 이에 상응하는 모형을 사용하도록 한다.

3) 모형의 영역은 과업대상지역의 유동특성을 적절히 모의할 수 있는 적절한 경계로 설정하되 필요시 광역과 상세역으로 구분     하도록 한다.

4) 모형의 격자망은 대상지역의 지형 및 구조물의 조건을 적절히 반영할 수 있도록 충분한 해상도를 갖는 격자로 구축한다.

5) 모형의 해안선 및 해저지형은 가장 최근의 해도, 수심도 및 지형도 등을 이용해 입력한다.

6) 실험에 필요한 제반 실험(물리)변수는 관측치 또는 이론적 방법으로 산정된 값을 부여하되 검정과정을 거쳐서 최종적으로     확정하도록 한다.

7) 실험조석조건은 대, 중, 소조기의 조류특성을 반영하기 위하여 최소한 주요 4대분조를 고려한 조건으로 한다.

8) 모형의 검증은 과업대상지의 조석 및 조류 관측치와 실험치의 비교에 의해 수행하며, 비교방법은 조위면 및 조위곡선비교,      최강유속비교 등의 방법으로 검증한다.

9) 실험안은 현황에 대한 것과 평면배치안에 따라 설정하여 항내해수 교환율을 실험하도록 한다.

3.5 수리모형실험

가.  2차원 단면수리모형실험

1) 개 요

방파제 단면에 대하여 피해원인 분석 및 단면의 안정성 및 규격의 적정성을 검토하고, 발견된 취약점을 개선할 수 있는 새로운    단면형식에 대하여 안전성을 검토하여 적정대안을 도출하여야 한다.

2) 실험내용 (당초단면 및 대안)

① 평상파 및 반사파에 대한 반사율 측정

② 평상파 및 설계파에 대한 전달율 측정

③ 설계파 및 초과파에 대한 월파량 측정

④ 설계파 및 초과파에 대한 구조물 안정성 검토

⑤ 설계파에 대한 구조물 소요중량 결정

⑥ 설계파에 및 초과파 대한 사면(소파블록)의 안정성 및 유실률 검토

3) 실험조건

① 실험의 구분

- 설계단면에 대한 단면실험(당초 단면 및 대안 3개 단면)

② 실험조위 : 삭망평균고조위와 약최저저조위를 적용.

③ 실험파랑 : 불규칙파로서 설계유의파 및 초과파 대하여 적용

④ 적용 스펙트럼 : 해역특성을 고려한 파랑특성자료를 활용하여야 한다.

⑤ 모형축척 : 1/30 ～ 1/100을 기준으로 수로의 규격과 설계파고를 검토하여 가능한 한 큰 축척 사용

4) 모형의 설치

① 방파제의 단면모형을 축척에 따라 제작

② 소파블록과 상치콘크리트 블록은 개당 중량의 축척에 맞도록 모형블록을 별도 제작하여 정적 또는 난적 등 현장설치조건과     동일한 형태로 설치

③ 수조의 말단부에 소파장치를 설치하여 반사파의 영향을 감소시킴

5) 조파기 및 계측기기 설치

① 조파기는 피스톤형 서보방식의 actuator에 의하여 조파판을 작동하는 방식으로서 actuator의 최대이격거리는 60cm이며 모     형상에서 수심이 1m인 경우에 최대 60cm 의 파고를 발생시키도록 하여야 한다.

② 파고계는 전기저항식으로서 수위변화를 전압의 크기로 감지하여 수면의 변화를 측정하며 오차는 0.5% 이내로 한다.

③ 파고계는 방파제 전면 지정된 위치에 3개를 설치하여 입사파 및 반사파를 측정하며, 전달률 측정을 위하여 방파제 후면     적당한 위치에 2개를 설치하여야 한다.

④ 파랑신호의 제어․입출력․변환 및 분석 등을 위하여 컴퓨터, A/D 및 D/A converter 등의 기기를 사용하여야 한다.

6) 실험방법

① 전달율 : 방파제 후면 항내측으로 현장여건을 고려하여 적정위치에 파고계를 설치하여 전달파고의 특성을 분석하여 입사     파고에 대한 비율을 계산하여야 한다.

② 쳐올림 높이(월파고) : 캠코더 사진자료 및 목측을 통해 쳐올림 높이를 계측하여야 한다.

③ 월파량 : 불규칙파에서의 월파량은 파고에 따라 차이가 크나 배후지 활용조건에 따른 적정 월파량을 설정하며, 월파량은     별도 제작한 장치를 이용하여 측정하며 방파제의 단위폭당 월파량으로 환산한다.

④ 반사율 : 3점법을 이용하여 각 안별로 모형전면에서의 반사계수를 측정하여야 한다.

⑤ 방파제 안정검토

- 소파블록의 안정성 검토 : 해저경사에 의한 소파블록의 위치별 이동양상 및 피해정도 파악 (방파제시점부, 제간부,제두부)

- 근고공의 안정성 검토 : 입사파랑에 의한 근고공의 안정검토

- 케이슨 제체의 안정성 검토 : 설계파 및 초과파에 대한 안정성 검토

⑥ 비디오 촬영 : 주요 실험장면 비디오 카메라로 촬영

나.  3차원 평면수리모형실험(두부안정성 실험)

1) 개 요

주 방파제에 대하여 외해로부터 침입하는 파랑이 방파제 개구부에서 회절 및 굴절과 파랑이 집중되는 현상을 재현하여 방파제      두부구간의 안정성을 규명하여, 방파제 두부 단면의 개선안에 대한 실험을 통하여 적정 두부구간 단면형상을 도출하는데 목적이 있음.

2) 실험내용

① 주 방파제 및 인근 수역의 파랑 특성을 파악

② 두부 방파제 대안별 안정성 실험

3) 실험조건

① 실험조위 : 삭망평균고조위와 약최저저조위를 적용.

② 실험파랑 : 불규칙파로서 설계유의파 및 최대파에 대하여 적용

적용 스펙트럼 : 파랑특성자료를 활용하여야 한다.

모형축척 : 1/50 ~ 1/100을 기준으로 수조의 규모와 설계파고를 검토하여 가능한 한 큰 축척 사용

4) 모형의 설치

① 주 방파제 전면에서의 파랑에너지 집중등 파랑의 변형을 적절히 재현할 수 있도록 모형의 범위를 설정하여야 한다.

② 설정된 구역에 대하여 축척 1/50 ~ 1/100의 정상모형으로 제작하여야 한다.

설정된 구역에 격자망을 설치하여 각 격자점의 표고를 정확히 측량하여 적정한 재료를 성형함으로써 해저지형을 실제와     유사하게 재현하여야 한다.

주파향이 모형상에서 적절히 재현되도록 하여야 한다.

5) 조파기 및 계측기기 설치

① 모형의 규모의 한계로 인하여 조파판은 천해역에 설치하되 방파제로부터 가능한한 멀리 떨어뜨리며 주파향에 의하여 항     입구를 통해 파랑에너지가 가장 많이 입사하는 방향으로 조파판을 설치하여야 한다.

② 주 방파제  주변의 정확한 분포를 파악하기 위하여 가능한 한 조밀하게 파고계를 배치하여 파고변화를 측정하여야 한다.

6) 실험방법

① 주변해역의 파고분포 : 파고계를 항내 또는 항입구 부근에 집중배치한 후, 조파기를 통하여 설계파에 대한 불규칙파를      발생시킨 상태에서 각 파고계에서 측정되는 수위변화를 컴퓨터에 입력시켜 결과를 분석하여야 한다.

② 방파제 외측의 파고분포 : 파고계를 방파제 외측 전면에 조밀하게 배치하여 파고의 크기를 측정한후 그 결과를 분석하여야 한다.

③ 방파제 안정검토

- 소파블록의 안정성 검토 : 해저경사에 의한 소파블록의 위치별 이동양상 및 피해정도 파악

④ 비디오 촬영 : 주요 실험장면 비디오 카메라로 촬영

3.6 보고서 작성

가. 보고서에 수록된 자료는 조사한 사항과 관계기관에 비치된 자료를 최대한 수집하여 자료의 출처와 조사기관, 참고 문헌         등을 명시하여야 한다.

나. 보고서에 편집할 내용, 순서, 성격 등을 준공기한 30일전까지 작성하여 감독관에게 사전 검토 받아야 한다.

다. 보고서 인쇄

1) 원안을 검토 받은 후 보고서 20부, 부록 20부 및 보고서를 CD에 삽입하여 제출하여야 한다.

2) 지형측량 및 수심측량 원도는 제출하고 그 도면 청사진을 보고서 후면에 봉투 첨부하여야 한다.

4. 피해복구 계획 수립

4.1 공통사항

가.  과업대상지역에 대한 기수행 용역 내용중 본 과업과 관련되어 있는 항목(표준단면, 공법, 설계파, 지반조사 내용 등)은

세부적으로 검토하여 그 적정여부를 판단하여야 한다.

나.  기수행 용역에서 검토되었던 연차별 건설계획, 연차별 투자계획, 공정계획을 검토하여 그 개요와 내용을 요약하여야 한다.

다.  공법선정의 적정성 검토

1) 기수행 용역에서 검토 · 정리된 관련 공법을 재검토하고 선정된 공법의 적정성을 경제성, 안전성, 시공성 등의 관점에서 분석하여야     하며 선정된 공법이 부적합하다고 판단할 경우에는 그 사유와 대안을 요약하여 발주처에 보고하고 발주처의 지시를 따라야 한다.

2) 기수행 용역에서 제시한 단면의 적정성을 검토하여 제시된 단면의 최적여부를 판단하고 그 근거를 객관적으로 제시하여야 한다.

4.2 계획의 기본방침

가.  현지피해조사를 종합 분석하여 기존시설물 안정성 여부를 종합검토한다.

나.  과거 태풍자료를 통한 피해상황 수집 및 각종 자료의 분석결과에 따라 외곽시설에 대한 종합적인 검토 및 복구계획 및 보강계획을 수립한다.

다.  과거 태풍자료 분석시 우리나라 피해뿐아니라 일본등의 피해사례 및 선진국의 본 경우와 비슷한 상황에 대하여 적용가능한      설계기법을 검토하여 제시한다.

라.  외국의 공법 등 신공법을 검토하여 경제성, 안정성 및 시공성 등이 인정될 경우 이를 적극 활용하는 방안을 강구하여야 한다.

4.3 태풍 피해복구계획 반영사항

가. 자연조건(설계파랑, 설계조위, 조류속, 폭풍해일) 및 재료조건, 안정조건 등에 대해 합리적인 설계기준을 설정하여야 한다.

나. 무이파에 의한 시설물 피해현황 및 피해원인을 명확히 조사․분석하여 복구계획 수립시 그 내용을 반영하여 장래 추가피해가      발생하지 않도록 복구계획을 수립하여야 한다.

다. 가거도항의 해역특성 및 수리적 조건 등을 재검토하여 방파제의 개량복구 단면을 제시하여야 하며, 공법변경이 필요한 경우     합리적이고 명확한 근거를 제시하여야 한다.

라. 태풍에 의해 피해를 입은 기 시설물에 대해 안전도 검사를 시행하여 구조적 안전성 확보를 위한 보강방안을 제시하여 방파제      기능수행에 문제가 발생되지 않도록 하여야 한다.

마. 태풍피해복구에 대한 보강계획에 대해 합리적인 건설계획 및 연차별 투자계획을 수립하여 반영하여야 한다.

5. 실시설계

5.1 공통사항

가.  본 용역의 태풍 피해복구 계획수립에서 정해진 내용에 따라 실시되어야 한다.

나.  구조물의 설계는 원칙적으로 항만 및 어항설계기준에 의하며 항만 및 어항공사 전문시방서 등을 참고로 실시하여야 한다.

다.  구조계산 등에 컴퓨터 소프트웨어를 사용하였을 때에는 사용 소프트웨어에 대한 설명과 함께 입력 데이터, 출력내용, 제한      조건 등을 상세히 수록하여야 한다.

라.  기초구조물 설계시에는 활동(원호활동 포함), 전도, 지지력 등을 검토하여야 하며 구조계산서에는 검토과정을 알 수 있도록      상세히 수록하며 내진설계의 적용여부를 검토하여야 한다.

마.  어항구조물에 대한 설계는 강도설계법을 사용함을 원칙으로 한다.  다만, 구조물 또는 재료의 특성상 강도설계법을 사용할      이유가 없다고 판단될 경우에는 발주처와 협의하여 허용응력설계법을 사용할 수 있다.

바.  해양콘크리트 구조물의 내구성 향상을 위하여 고내구성 콘크리트 사용을 우선적으로 검토하여 설계하여야 한다.

사.  비교안 작성

1) 중요 구조물의 설계는 각종 자료를 수집분석 검토하여 5개 이상의 구상안을 작성하여야 하며 그중 가장 경제적이고 내구성이 있는     안을 선정할 수 있도록 3개안 이상(합리적인 비교를 위하여 각각의 안은 그 자체로서 가장 경제적이고 안전한 최적의 안이     되어야 한다)을 선택하여 이에 대한 구조계산 및 공사비, 장단점, 기타 필요한 사항 등을 검토․작성하여 최적안을 선정하여야     한다.  다만, 구상안의 수는 공사의 규모등에 따라 발주처와 협의하여 조정할 수 있다.

2) 각각의 비교안 검토시에는 유지관리비를 포함한 경제성 분석이 이루어져야 한다.

아.  사전 협의사항

◦ 수급인은 과업진행중 다음과 같은 세부사항은 이 과업지시서의 다른 항목에 특별한 규정이 없더라도 발주처와 협의하여         결정하여야 한다.

① 구조물의 위치, 형식 및 규모

② 적용공법

③ 구조물의 표준단면(공사비를 산정을 위한 단면 포함)

④ 중요 건설자재

⑤ 적용할 시공법 등

5.2 공법 및 단면선정

가. 수급인은 과업대상시설을 경제적으로 건설하기 위하여 관련 공법 및 최신 공법을 포함한 국내의 여러 공법 및 외국에서 사용      또는 개발된 최신 공법 등을 종합적으로 조사하여 그 장단점 및 시공조건, 시공사례 등을 검토․정리하여야 한다.

나. 보강공법선정 후 피해구조물의 보강 표준단면을 결정하여야 하며 보강 표준단면은 그 구조물의 피해구역의 단면을 대표할      수 있도록 적절하게 선정하되 구조계산에 관한 내용은 “구조계산”항목을 따라야 한다.

다. 수급인은 방파제 준공도면을 면밀히 검토하여, 태풍피해복구공사를 위한 세부적인 구간별 단면을 결정하여야 하며 세부단면      결정시에는 과업대상지역의 토질 및 지반조건, 수심 등 시공조건을 고려하여 경제적이고 안전하며 원활한 피해복구가 가능      하도록 결정되어야 한다.

5.3 보강공법 선정의 한계성 검토

가. 주요 보강공법의 비교검토 후 하나 이상의 공법을 선정할 경우, 그 선정과정에서 불확실한 조건이나 또는 자료가 없어 추정      하여 공법을 선정하였을 경우에는 그 내용을 정리․요약하여 검토할 수 있도록 하여야 한다.

나. 보강공법 선정의 한계성은 용역수행시 선정된 공법이 실제 적용이 불가능하여 불가피한 공법변경과 이에 따른 공사비 증가를      방지하기 위한 방향으로 검토되어야 한다.

5.4 구조계산

가. 보강공법의 비교 검토를 위한 각 공법의 구간별 대표단면 결정시 구간별 보강단면에 대한 구조계산을 하여 최적단면을 선정      하여야 하며, 이의 판단의 근거를 설명하여야 한다.

나. 구조계산의 내용은 체계적으로 요약하여 발주청에서 쉽게 알 수 있도록 정리하여야 하며, 구조계산에 사용된 설계조건, 변수      또는 설계정수 등을 명확히 보고서에 수록하여 그 내용을 알 수 있도록 하여야 한다.

5.5 세부수량 및 공사비 산출

가. 보강대상시설에 대한 세부적인 물량을 산출하고 공사비를 산정하여야 한다.

나. 보강공사 착공후 물공량 산정, 설계누락 등으로 인하여 총사업비가 증가되지 않도록 수량 및 공사비를 객관적이고 합리적으로      산출하도록 최대한 노력하여야 한다.

다. 특히, 피해조사 불철저로 인한 구조물의 파손 또는 구조변경 사례발생으로 공사비 증가 및 공사지연이 되지 않도록 설계하여야 한다.

5.5 건설계획 수립

가.  연차별 건설계획 수립

이 과업지시서에 의해 수행된 공사의 연차별 건설계획을 투자우선순위 및 투자사업비 등을 고려, 발주청과 협의하여 결정하고 이를 총사업비와 공종별로 정리하여야 한다.

나.  시공계획 수립

1) 공사시공을 위한 시공계획을 수립하되 다음의 내용이 포함되어야 하며 공정계획은 CPM기법(주공정계획법;critical path          method)을 사용하여 수립하고 그 내용을 보고서에 수록하여야 한다.

① 자재 및 장비사용계획

② 공정계획

③ 공사 작업장 확보계획

④ 기타 시공시 특히 필요한 사항

2) 공사기간은 CPM으로 정확하게 산정하여 차후 공사시공자가 품질확보에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 지장물 및 지하매설물 이설계획

1) 계획대상지역내의 지장물 및 지하매설물 현황을 파악하고 이설 또는 보강이 필요할 시에는 이에 대책을 수립하여야 한다.

2) 지장물 및 지하매설물 현황파악과 대책은 육상과 해상지장물로 구분하여 정리하여야 한다.

라.  안전관리 및 품질관리 계획

1) 공사 시공중에 유의하여야 할 안전관리 사항과 품질확보를 위한 품질관리 계획을 수립하여야 한다.

2) 안전관리 및 품질관리계획은 공사시방서에 그 내용이 상세히 수록되어야 한다.

마.  시험시공

공사시행중 품질확보를 위해 시험시공이 필요한 경우에는 이에 관하여 검토하여야 하며 시험시공과 관련하여 유의하거나 관측하여야 할 사항은 공사시방서에 그 내용이 포함되어져야 한다.

5.6 관련 서류 및 기타자료 수집․작성

가.  공사 시행전 또는 시공중에 공사와 관련하여 관계부서 협의사항이 필요한 경우에는 이에 대한 관계법규를 검토하여 자료를

수집․정리하여 제출하여야 한다.

나.  사업비의 예산확보를 위해 필요한 기본자료를 발주처와 협의하여 작성하여야 한다.

다.  기타 이 사업시행과 관련하여 필요한 서류가 있어 발주청이 지시할 때에는 관련 자료를 수집․정리하여야 한다.

5.7 설계도서의 작성

이 과업지시서의 「8. 설계도서 작성방법」항목을 참고한다.

5.8 실적공사비 작성

실적공사비 축적을 위해 설계서, 설계예산서 등은 정부제정 산출기준과 실적공사비 및 표준품셈규정에 따라 발주청과 협의하여 작성하여야 한다.

6. 분야별 세부수행 기준

6.1 설계기준강도

각 구조물별 설계기준강도는 항만 및 어항설계를 기준으로 하되 그 기준을 적용할 수 없는 특별한 이유가 있을 때에는 발주처와  협의하여 조정할 수 있다.

6.2  철근콘크리트 구조물

가.  철근콘크리트 구조물의 철근배근도를 작성할 때에는 굵은골재의 최대치수를 고려하여 시공이 용이하도록 철근을 배치하여야      하며 특히 모서리 부분이나 복잡한 부분은 철근의 피복두께가 확보될 수 있도록 특히 유의하여야 한다.

나.  철근배근이 복잡하여 시공시 품질확보에 세심한 주의를 요구하는 경우에는 이 내용을 공사시방서에 포함하여 품질확보가       가능하도록 하여야 한다.

6.3 방파제 개량복구 실시설계

가. 방파제 복구방안수립시 피해현황, 파랑, 조위를 고려하여 시공성 및 안정성이 확보된 단면을 제시하여야 한다.

나. 과거 가거도항에 피해 및 영향을 미친 태풍에 대해 조사․검토하고 이상파랑 및 폭풍해일고를 산정하여 그 결과를 설계조위      및 설계파 산정에 반영하여야 한다.

다. 수급인은 가거도항의 지리적 특성 및 현지여건상 방파제 시설물의「공법선정의 한계성」에 대해 검토하고 이에 대한 명확한      해결책 또는 대책을 제시하여야 하며, 공법변경이 불가피하다고 판단될 때에는 그 내용을 발주처에 보고하고 협의하여 결정      하여야 한다.

7. 종합 및 건의

가.  이 과업수행의 결과를 종합하여 요약하므로써 이 과업에 의한 과업수행결과를 쉽게 알 수 있도록 하여야 한다.

나.  과업수행 결과 기 수립된 어항기본계획의 변경조치 등과 같이 행정적인 조치가 필요하거나 기타 공사 시행과 관련하여 특기사항      등 중요사항이 있을 때에는 그 내용을 검토하여 보고서에 수록하여야 한다.

8. 설계도서 작성방법

8.1 공통사항

가. 용역사는 발주에 필요한 일체의 설계도서를 작성․제출하여야 하며 설계도서의 크기, 형식 등은 발주처와 협의하여 다음 사항이     포함되도록 하여야 한다.

1) 설계설명서

2) 공사시방서

3) 동원인원계획표

4) 예정공정표

5) 예산(설계)내역서

6) 일위대가표

7) 수량계산서(토적표 포함)

8) 단가산출기초(중기사용료 포함)

9) 주요자재표

10) 구조계산서

11) 설계도면

나.  설계도서는 시공자가 쉽게 이해할 수 있도록 작성하여야 하며 공사시방서와 공사내역서, 설계도면이 상호일치되게 작성하여야 한다.

다. 설계도서는 원칙적으로 우리부의 건설공사업무규정에 따라서 작성하도록 한다.

라.  구조물별로 또는 동일 구조물이라 하여도 부위별로 각각 소요 콘크리트강도와 굵은골재 허용 최대치수 등을 설계도면과 공사      시방서에 명기하여야 한다.

8.2 설계도 작성

가.  설계도면은 CAD로 작성하여 CD로 제출하여야 하고 우리부의 도면관리에 대한 규정에 부합될 수 있도록 발주청과 협의하여       작성․납품하여야 한다.

나.  구조물 부위중 특히 시공에 유의하여야 할 부위나 구조형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도 설계상세도를 작성하여야 하며      시공시 필요한 시공상세도면의 작성목록을 별도로 작성하여 시공시의 품질관리가 적정하게 이루어지도록 하여야 한다.

다.  구조물의 일반도, 측면, 정면도 및 복잡한 부위에 대한 상세도를 그려야 한다.

라.  단계별 시공을 고려하여 설계도면을 작성하여야 하며 절단부 및 이음부는 품질관리를 위해 상세도를 작성하여야 한다.

마.  철근배근도, 철근수량표를 작성하여야 하며, 특히 단부 등에 대한 상세배근도와 철근피복두께 확보 및 정․부철근 등의 간      격유지를 위한 받침 및 간격유지재의 재료 및 설치위치도, 상세도를 작성하여야 한다.

바.  구조물 도면에 발생가능한 균열(crack)의 종류, 허용폭 등에 대하여 서술하고 균열발생시의 처리방법 등에 대하여 명시하여야 한다.

사.  상세도로 표시할 수 없는 주의사항(시공시 유의사항 등)에 대해서는 우선적으로 도면에 명기하고 그렇지 못할 경우에는 공사시방서의 각 절(section) 내의 4. 특기사항 또는 공사시방서의 마지막 부분(part) 특별사항 내에 필히 작성되어져야 한다.

8.3 공사시방서 작성

가.  공사시방서는 설계도면 등에 표현될 수 없는 내용과 보충 설명하는 사항, 시공과정에서 필요한 기술적인 사항 등이 포함될 수      있도록 작성하여야 하며 시공과정에서 분쟁 또는 클레임(claim)이 발생되지 않도록 유의하여 작성하여야 한다.

나.  공사시방서는 항만 및 어항공사 전문시방서를 기준으로 하여 작성하되 항만 및 어항공사 표준시방서 등 기타 이 공사의 시행과      관련된 표준시방서를 참고로 작성하여야 한다.

다.  공사시방서의 항목은 설계내역서의 공종에 따라서 작성하여 쉽게 검토․이용할 수 있도록 하여야 한다.

라.  공사시방서의 항목별 작성기준(format)은 다음과 같아야 한다.

1) 일반사항

2) 재료

3) 시공

4) 특기사항

마.  이 과업에 의하여 시공되는 공사와 관련하여 공종별로 특별히 고려하여야 할 사항은 앞의 (4)항의 4 특기사항에 상세하게       각각 기술하여야 하며 개별 항목(section)에 포함시키기 어려운 경우에는 통합하여 공사시방서의 가장 뒷부분에 특별사항이      라는 제목(Title)으로 그 내용을 상세히 작성하여야 한다.

바.  이 과업에서 검토된 안전관리 및 품질관리, 기타 설계도면 작성시 도면에 표기되어질 수 없는 내용등 공사시공과 관련

하여 필요한 내용은 공사시방서에 포함되어야 한다.

9. 성과물 제출

가.  수급인은 과업수행과정중에 생산된 각종 조사, 연구, 검토결과를 정리하여 실시설계보고서를 작성하고 필요시 별도의 요약      보고서를 작성 제출하여야 한다.

나.  실시설계 보고서에는 각종 보고서(조사보고서, 구조계산서 등 모든 보고서)에 대한 목록이 포함되도록 하여 이 과업과 관련      하여 제출되는 보고서의 종류와 종류별 권수를 언제라도 알 수 있도록 하여야 한다.

다.  수급인은 각종 설계도서를 아래와 같이 작성하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 발주청과 성과물 항목 및 수량조정 등을 협의      하여 조정할 수 있다.

1)  보고서 및 부록 : 30부(요약서 포함)

2)  설계도서

① 설계내역서 : 10부

② 공사시방서 : 10부

③ 수량 및 단가산출서 : 10부

④ 구조계산서 : 10부

3)  각종원도 : 각 1부

① 각 공종별  6절 축소판 도면(복사) : 10부

② 계획평면도 및 표준단면도 : 50부

라.  기 타

1) 사진첩 : 1부(원판포함)

2) CD(설계도) : 10개(보고서 및 부록, 설계도서 수록)

3) 기타 이 과업수행으로 인하여 생산되는 각종 도서 1식

Ⅱ. 지형 및 수심측량 구역도

Ⅲ. 예정공정표

공 종	제1월		제2월	제3월	제4월	제5월	제6월	비고
1. 기초자료조사
2. 현지조사
3. 수치모형실험
4. 수리모형실험
5. 피해복구계획 수립
6. 실시설계
7. 성과품 작성
단위공정(%)	20		15	15	20	15	15
누계공정(%)	20		35	50	70	85	100

3. 설 계 예 산 서

2011년 10월 설계	설계자	김인호	심사자	최재화	계장	김용원	과장	전충남
2011년도 가거도항 태풍피해복구공사 실시설계용역 설계예산서 ○ 용역개요 : 실시설계 1식 ○ 총용역비 : 일금 이십칠억이천이백만 원정 ○ 도 급 액 : 2,722,000,000 원정 ( 부 가 세 : 247,454,545 원정 포함 ) ( 손해배상보험료 : 17,180,206 원정 포함 )

4. 일  위  대  가

5. 단 가 산 출 서

6. 노임 및 자재단가

〈 사업 위치도 〉

〈 계획 평면도 〉