Ⅰ.	용 역 설 계 설 명 서

1. 목적

본 과업은 책임감리대상 공사에 대하여 건설기술관리법(이하 “건기법” 이라 한다.) 제27조 규정에 따라 발주청의 위탁에 의하여 관계법령에 따라 발주청의 감독 권한을 대행하여 당해공사의 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리, 공정관리, 안전 및 환경관리 등에 향상을 도모하고자 함.

2. 과업의 범위

가. 사업명 : 낙동강(경남)하천운영사업 통합전면책임감리용역

나. 하천명 : 낙동강(경남, 부산지역)

다. 위  치 : 부산광역시, 양산시, 김해시, 창원시, 밀양시, 창녕군, 함안군, 의령군, 합천군 지내

라. 과업개용(2013년 시행분)

- 저수호안보강공사  : 5개소

- 하천시설정비공사 : 10개소

Ⅱ.  일 반 과 업 지 시 서

1. 책임감리를 수행함에 있어 본 공사의 설계도서, 책임감리 현장참여자 업무지침서, 감리과업지시서, 아래의 각종 시방서 및 규정에 의하여 수행할 수 있도록 사무실에 비치하여 이를 충분히 숙지하고 철저히 이행하여야 한다.

(1) 감리대상 공사의 설계도서 및 시방서와 본 감리용역 설계서의 시방서

(2) 토목공사 일반표준시방서

(3) 콘크리트 표준시방서

(4) 하천공사 표준시방서

(5) 하천설계기준(하천공사 설계실무요령)

(6) 관련 하천기본계획 보고서

(7) 도로공사 표준시방서

(8) 도로교 표준시방서

(9) 도로포장 설계 및 시공지침

(10) 구조물 기초설계기준

(11) 건설공사 관계법령 및 규정(하천법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건설산업기본법, 책임감리 현장참여자 업무지침서 등)

(12) 한국산업규격 및 KS규격집

(13) 건설공사품질 및 규격관리 실무편람

(14) 산업안전보건법

(15) 환경․교통․재해 등에 관한 영향평가법

(16) 기타 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

2.  감리원의 기본임무

“감리원”은 건기법 제27조에 의거 발주기관의 장과 감리전문회사 간에 체결된 계약내용에 따라 발주기관의 장의 공사감독업무를 대행하며, 특히 건기법 시행령 제52조 제1항의 업무와 동 시행규칙 제34조의 규정에 의한 감리원의 업무를 성실히 수행하고 건설공사의 품질향상에 적극 노력하여야 한다.

3. 감리원의 지위

(1) 감리원은 당해 공사가 설계도서 및 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리, 안전관리 및 공정관리 등에 대한 기술지도를 하며, 발주청과의 계약에 의하여 발주청의 감독 업무를 수행한다.

(2) 감리원의 업무자세

감리업무에 종사하는 자는 그 업무를 성실히 수행하고, 건설공사의 품질향상에 노력하며, 감리원으로서 품위를 유지하여야 한다.

(가) 감리원은 법률과 이에 따른 명령, 공공복리에 어긋나는 어떠한 행위도 하지 않으며 신의와 성실로서 업무에 임한다.

(나) 감리원은 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

(다) 감리원은 담당업무와 관련하여 제3자로부터 일체의 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 안된다.

(라) 감리원은 공사감리를 수행함에 있어서 성실, 친절, 공정, 청렴결백하게 업무를 수행하여야 한다.

(마) 감리원은 건설공사의 품질향상을 위하여 기술개발 및 보급에 전력한다.

(3) 감리원의 근무지침

(가) 감리원은 감리업무를 수행함에 있어서 당해 공사의 공사계약문서, 감리과업지시서, 기타 관계규정 등의 내용을 숙지하고, 당해 공사의 특수성을 파악한 후 감리에 임해야 한다.

(나) 감리원은 당해 공사가 공사계약문서, 공정계획표, 발주청장의 지시사항 등 기타 관계규정 내용대로 시공되는가를 공사시행 시 수시로 입회하고 공정단계별로 시기를 적절하게 확인, 검측하여 엄격한 품질관리에 임해야 하고, 기타 시공자에게 품질, 시공, 안전, 공정관리 등에 대한 감리수행을 하고 확인하여야 한다.

(다) 감리원은 시공자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 임의로 설계를 변경시키거나, 기일연장 등 공사 계약조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 아니된다.

(라) 감리원은 공사현장의 문제점이 발생되거나 시공에 관련한 중요한 변경 및 예산과 관계되는 사항에 대하여는 수시로 발주청장에게 보고하고 그 지시를 받아 업무를 수행한다.

다만, 인명손실이나 시설물의 안전에 위험이 예상되는 사태가 발생할 시에는 먼저 적절한 조치를 취한 후 즉시 발주기관에 보고하여야 한다.

(마) 감리전문회사 대표자 및 감리원은 당해공사 시행중은 물론 공사가 종료된 후라도 감사기관의 수감 요구가 있을 경우에는 이에 응하여야 하며, 감리업무수행과 관련하여 발생된 사고 또는 피해발생으로 피해자가 소송제기 시 국가 지정 소송업무에 대하여 적극 협력하여야 한다.

(4) 기술지원감리원의 업무범위

감리전문회사의 본사 등에 근무하면서 현장 상주감리원의 업무를 지원하는 기술지원감리원의 업무범위는 다음과 같다.

(가) 상주감리원이 수행하지 못하는 현장조사 분석 또는 주요구조물의 기술적 검토

(나) 기성 및 준공검사

(다) 행정지원업무

(라) 설계도서 등의 검토

(마) 중요한 설계변경에 대한 기술검토

(바) 현장 시공상태의 평가 및 기술지도

(사) 정기적(현장에서 담당분야의 공종이 진행되는 경우 담당 기술지원감리원은 월 1회 이상, 상반기와 하반기 각 1회 이상 발주청과 협의하여 결정한 날짜에 기술지원감리원 전원 합동시행)으로 현장 시공상태를 종합적으로 점검, 확인, 평가하고 기술지도하고 감리전문회사 대표자는 그 결과를 발주청에 통보

(아) 설계변경 및 계약금액 조정의 심사

(자) 기타 감리업무 추진에 필요한 지원 업무

4. 감리업무 절차 및 운영

(1) 절    차

책임감리원은 기술지원감리원 및 보조감리원의 개인별 업무분담 내용에 따라 업무수행계획을 수립하고 다음 절차에 의거 과업을 수행토록 하여야 한다.

												일일 감리계획 수립 (책임감리원)
								일일 감리계획 수립				현장 감리원별 수행업무 지정, 지시사항 시달
												지정된 업무에 대한 시공 및 품질관리 계획 등의 검토
								( 1 일 전 )				착안사항 준비 및 지시사항 숙지
												※ 사전준비 : 설계도서의 숙지, 시공법 및 관련 작업 내용
												파악, 검측요령 작성
												시공상태 확인
								감 리 원				시험실시 입회 및 성과 확인
												각종 검측 등 지정업무 수행
기술지원감리원												지적사항 시정조치 결과 확인 등
						현장조사분석 주요구조물의 기술적 검토 기성 및 준공검사 행정지원 업무 등						일일업무 수행일지, 감독일지, 자재수불부 정리 등
												※ 주요구조물은 전 공종 비디오 촬영 기록
								일 일 평 가				당일 수행업무 분석 및 평가
												문제점 토의 및 시정 등
												부실공사 방지대책 토의
												품질 및 안전관리사항 이행상태
												공사추진 계획 및 실적
								주 간 평 가				공사추진 저해요인 분석
												지시사항에 대한 이행상태
												기타 문제점, 애로 및 건의사항 등
												※ 현장대리인, 공사관리관과 합동회의 실시결과는 월간 보고서에 수록 제출
		분기별 또는 최종보고서 작성 제출

(2) 운    영

(가) 승인된 감리원은 업무의 연속성, 효율성 등을 고려하여 특별한 사유가 없는 한 감리용역 완료시까지 근무토록 하여야 하며 교체가 필요한 경우에는 교체사유를 명시하여 발주청장의 사전 승인을 받아야 한다.

(나) 감리단의 조직은 공사담당과 품질담당 등으로 현장여건에 따라 구성토록 함으로써 감리업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 하여야 한다.

			감리전문회사 대표자
기 술 지 원 감 리 원
기술 검토
기성, 준공	검토		책 임 감 리 원		감리업무	총괄
			보 조 감 리 원
			공사, 품질 및 안전 담당

(다) 책임감리원은 보조감리원에게 개인별로 업무를 분담하고 분담내용에 따라 업무수행계획을 수립하여 과업을 수행토록 하고 매일 감리업무의 추진계획 및 실적이 기록된 개인별 일지를 취합하여, 그 내용을 확인, 점검하고 이를 비치하여야 하며 준공시에는 발주청장에게 제출하여야 한다.

(라) 감리원은 업무계획을 수립, 운영하고 특히 엄격한 품질관리를 위하여 공사단계별 품질시험을 철저히 이행하여야 하며, 미시행 또는 불합격일 경우 즉시 시정토록 하고 그 구간에는 재시공을 실시하여 시정이 완료될 때까지 후속공사를 시켜서는 안된다.

(마) 감리원의 구성은 과업지시서에 기술된 과업내용에 의거 관련분야 기술자격자 또는 학력, 경력을 갖춘 자로 구성하고 공사발주 초기에 보상 등이 지연되거나, 민원발생 등으로 공사추진이 원활치 않을 경우와 동절기 공사 중지기간, 해빙기로 인하여 공사진척이 잘 안되는 경우 및 공종이 단조로워질 때에는 추가 공종과 공사진행 상태에 따라 발주청장과 협의하여 인력을 탄력적으로 조정하여야 한다.

(바) 각 감리원이 작성 비치하여야 할 일지에는 다음 내용 등이 수록되어야 한다.

1) 일일 감리업무 수행내용

- 주요 구조물 등의 검측결과 지적사항 및 시정 조치사항

2) 시공과정에서의 문제점과 이의 해결방법 등 시공에 대한 전반적인 자체 평가서

3) 민원사항 접수, 처리 및 조치계획

4) 공사추진 중에 발생된 실패사례를 육하원칙에 따라 상세히 기록하고 개선결과도 상세하게 기록, 작성

5) 품질관리시험 실시, 지도 및 시험성과에 관한 검토, 확인

6) 재해예방대책 및 안전관리의 지도

7) 하도급에 대한 타당성 검토

8) 용지보상 지원 및 민원사항 해결을 위한 업무수행

9) 기타 주요 감독업무 수행사항

(사) 발주기관의 자문요구

1) 발주기관은 당해 공사와 관련하여 공법의 변경, 특수공법 등에 대한 기술적인 자문을 요구할 수 있으며 이 경우 감리전문회사는 필히 자문에 응하여야 한다.

2) 감리원은 발주기관장이 요구하는 중요한 사항에 대하여 본사 지원반을 운영 자문하여야 하며, 검토가 불가능하여 제3자에게 의뢰해야 하는 전문성을 요하는 자문은 발주기관과 협의하여 국내외 전문가에게 자문을 받아 의견을 제시하여야 한다.

5. 상주감리원의 현장근무 수칙

(1) 상주감리원은 공사현장(공사와 관련한 외부 현장점검, 확인 등 포함)에 상주하여야 하며 업무 또는 부득이한 사유로 1일 이상 현장을 이탈하는 경우에는 반드시 근무상황부에 이를 기록하여야 하며, 책임감리원인 경우에는 발주청장 또는 지원업무 수행자의 확인(부재 시 유선보고)을 받아야 한다.

(2) 상주감리원은 감리사무실 출입구 부근에 부착한 근무상황판에 당일현장 근무위치 및 업무내용 등을 기록하여야 한다.

(3) 감리전문회사는 감리업무에 종사하는 감리원이 감리업무수행기간 중 건기법에 의한 교육이나 민방위 기본법 또는 향토예비군 설치법에 의한 교육을 받는 경우나 근로기준법에 따른 유급휴가로 현장을 이탈하게 되는 경우에는 감리업무에 지장이 없도록 직무대행자 지정(동일현장의 상주감리원 또는 기술지원감리원) 및 업무 인계인수 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

(4) 상주감리원의 근무는 근로기준법에 준하여 근무토록 하며 공사추진에 지장이 없도록 하기 위하여 발주기관의 요청이 있을 경우 요청내용에 따라 초과근무를 하여야 하며, 시공자의 요청이 있을 경우에는 발주기관의 승인을 받아 초과근무를 하여야 한다.

이 경우 대가지급은 근로기준법에서 정하는 내용에 따른다.

6.  일반과업지시서의 내용과 특별과업지시서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별과업지시서가 우선한다.

7.  일반 및 특별과업지시서에 명기된 내용이외에 정밀공사 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주청장과 협의하여 시행하여야 한다.

Ⅲ.  특 별 과 업 지 시 서

1. 적용기준 : 본 특별과업지시서는 모든 계약도서와 상호 관련하여 해석하여야 하며 다른 계약도서에 중복하여 규정되어 있지 않은 사항일지라도 어느 한 계약도서에 규정되어 있으면 확립된 규정으로 간주하고 준수 이행하여야 하며 일반과업지시서와 특별과업지시서의 내용이 서로 상충될 시에는 특별과업지시서를 우선으로 적용하고 나머지는 감리업무수행지침서의 규정을 적용한다.

2. 감리용역기간 : 감리착수일로부터 24개월(730일) 로 한다.

3. 설계변경조건

(1) 건기법에 의한 감리대가기준이 변경되었을 때

(2) 감리기간 및 책임감리의 중단 등으로 감리기간이 연장 또는 단축 되었을 때

(3) 감리업무량에 따라 감리원수의 증․감이나 등급변경이 있을 때

(4) 제경비 및 기술료는 직접인건비 증․감에 따라 정산한다.

(5) 직접경비는 당해 업무수행에 필요한 감리원의 현지근무 수당, 숙박비 및 현지운영 등에 필요한 아래 비용을 포함하며 계상기준은 건설공사 감리대가기준(국토해양부 고시 제2010-000, 2010.12.30)에 따른다.

(가) 감리원의 주재비 및 출장여비는 직접인건비의 증․감에 따라 정산

(나) 현지차량 운행비 및 현지사무원 급료는 감리기간에 따라 정산

(다) 보고서 등 인쇄비는 발간부수 및 면수에 따라 정산

(라) 기술지원감리비 및 출장비등은 실지에 맞추어 정산

(6) 야간 및 휴일근무 등으로 감리원의 근무일수에 변경이 있을 때

(7) 기타 발주기관의 사정에 의한 예산의 증․감 등 정당한 사유가 발생되었을 때

4. 감리원의 배치기준

(1) 감리용역 수급자는 본 감리용역의 입찰참가 자격심사 시 입찰참가 제안서에 명시된 자로 참여하여야 하며, 만약 불가피한 경우에는 자격 및 해당분야 경력이 그 이상이거나 동등한 자로 하여 발주청장의 승인을 득하여야 하며, 본 사업의 특성을 감안하여 감리업무를 책임감 있게 수행하고 모든 분야에서 책임감리를 완수할 수 있는 능력과 자격을 갖춘 자로서 감리수행능력이 우수한 다음과 같은 기술자를 현장에 배치하여 특별한 사유가 없는 한 감리용역 완료시까지 근무토록 하여야 하며, 감리수행 중 부적격 사유가 발생하여 발주청장이 교체를 명할 때에는 이에 응하여야 하고, 감리전문회사의 사정에 의하여 감리원을 교체하고자 할 경우에는 동등이상의 기술자격, 경력 등을 종합적으로 검토하여 감리업무 수행능력이 저하되지 않는 범위내에서 필히 발주청장의 사전승인을 득하여야 한다.

(가) 수석감리사 : 별표1의 자격기준자로서 건기법시행규칙 제34조의2, 책임감리원의 경력기준 이상인 자

(나) 감 리 사 : 별표1의 자격기준 이상인 자

(다) 감리사보 : 별표1의 자격기준 이상인 자

(라) 기술지원감리원  : 감리사 자격이상의 자로서 수자원개발, 토목구조, 토질 및 기초, 환경, 조경 등의 기술사자격 소지자 및 경력자.

(2) 상주감리원의 배치는 발주기관의 사전승인을 받아야 하며, 발주청장은 건기법 제27조 및 동법 시행령 제52조, 시행규칙 제32조에 의거 상주감리원 및 감리원 자격등급을 현지여건에 따라 인원배치 등을 탄력적으로 조정 배치․운영할 수 있다.

5.  세부수행 업무

(1) 현장 책임자 업무연락처, 감리수행계획 및 설계도서 검토내용 보고

(가) 감리원은 현장에 착임하는 즉시 현장사무소, 숙소 또는 비상연락처의 전화번호 및 FAX, 우편연락처 등을 발주기관에 보고하여 업무연락에 차질이 없도록 하여야 하며, 변경되었을 경우에도 즉시 보고하여야 한다.

(나) 감리원은 해당공사 시행전에 설계도서의 구조적 안정성, 시공성 등에 대한 적정여부를 검토하고 공사계약문서 등의 상호 모순되는 사항 및 현장실정과의 부합여부 등을 검토하여 발주청장에게 보고하여야 한다.

(다) 도면과 시방서가 상이할 경우에는 발주청장과 별도 협의하여 시공하여야 하며, 착공 후 도급자로 하여금 공사세부시공 계획서를 작성, 제출케 하고 각 공종을 시작할 때마다 해당 공종에 대하여 구체적인 품질 확보방안이 포함된 시공계획을 제출하게 하여 이를 감리원의 승인을 득한 후 시공토록 하여야 한다.

(2) 사무실 및 서류 등의 보관

(가) 발주기관이 제공하는 감리사무실은 공사규모 및 현장실정에 부합되도록 업무용 사무실과 상황실, 숙소를 발주기관과 협의하여 감리업무에 지장이 없도록 설치하여 효율적인 업무추진이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

현장의 중요도 또는 위험도에 따라 제한구역 및 통제구역을 설정하고 출입자를 철저히 단속하도록 하여야 한다.

상황실                :  제한구역

감리사무실            :  제한구역

현장사무실 부지       :  제한구역

(나) 현장사무실 부지 입구에 출입자를 통제할 수 있는 시설을 시공자에게 설치토록 하고, 제한구역 및 제한지역내의 출입자에 대해서는 직업, 성명, 방문목적, 시간 등을 기록, 비치토록 하여야한다.

(다) 감리원 사무실에는 각종 사무용 집기 및 기구를 감리업무에 지장이 없도록 비치하고 설계도서 보관함, 서류함 및 케비닛에는 정․부 책임자의 명패를 부착하고 관리하여야 한다.

(라) 감리원은 착공과 동시에 공사설계도서 및 자료, 공사계약문서 등을 발주기관으로부터 인수하여 관리번호를 부여하고, 관리대장을 작성하여 공사관계자 외의 유출을 방지하는 등 관리를 철저히 하여야 하며, 외부유출시 지원업무수행자의 승인을 받아야 한다.

(마) 케비닛 등에 보관된 설계도서 및 관리서류의 명세서를 기록하여 내측에 부착하여야 한다.

(바) 설계도서는 반드시 도면 보관함에 보관하며 관계자 외에는 열람, 차용 등을 금지하여야 한다. 설계도서에는 필히 우측상단에 관리번호를 부여하여 관리하여야 한다.

“예”

1～20

20

※ 위 숫자는 관리번호, 아래 숫자는 총생산 부수

(사) 시공자가 차용하여 간 설계도서도 필히 상기 요령에 의거 보관하여야 한다.

(아) 감리원은 공사완료 후 인수한 설계도서는 발주청장에게 반납하거나 지시에 따라 폐기처분한다.

(3) 공사안내 표지판 제작 설치

(가) 감리원은 공사착수 이전에 공사안내 표지판을 제작, 설치하도록 하여야 하며, 기타 성실시공 등 공사와 관련된 표지판을 지원업무수행자와 협의하여 제작, 설치하도록 하여야 한다.

(4) 용지도 및 조서작성과 지장물 및 용지경계 표지 등 확인

(가) 감리원은 분할 용지도에 의한 용지경계 설정을 확인하고 수급자로 하여금 경계표시를 설치하게 하여야 한다.

(나) 분할용지도, 용지조서 및 지장물조서 등을 활용, 현지를 재확인하여 공사추진에 지장이 없도록 당해년도 시공구간에 대한 기공승낙 징구 등 보상협의를 지원 및 협조하여야 한다.

(다) 편입용지 보상협의 유무와 지장물 철거 및 이설 확인 등을 철저히 파악하여야 하며, 협의불응 소유자에 대하여는 수용재결 신청서류를 조속히 작성토록 적극 협조하여 공사추진 장해요소를 사전 해소하여야 한다.

(라) 공사 중 지하매설물 등 새로운 지장물 발견시에는 수급자로부터 상세한 내용을 제출받아 이를 확인한 후 발주청장에게 조속 보고 및 관련 규정에 따라 조치하여야 한다.

(마) 공사로 인하여 분할될 농경지 등 잔여지 보상의 적정성에 대하여 검토, 보고하여야 한다.

(5) 측점 표기 및 구조물 위치 표지판 설치

(가) 확인측량 및 중심점 말뚝 측량이 완료되면 매 측점마다 측점 표기를 하고 절토부, 성토부에 각 측점마다 토공규준틀을 설치하여야 한다.

(나) 배수시설 및 옹벽구간 시․종점에는 구조물의 위치를 알 수 있도록 표지판을 설치토록 하여야 한다.

(6) 확인측량 실시

(가) 감리원은 착공과 동시에 시공자로 하여금 발주 설계도와 실제 현장의 이상유무를 확인하는 확인측량을 조속히 실시토록 하여야 한다.

1) 삼각점 또는 도근점에서 중간점(IP) 등의 측량기준점의 위치(좌표)를 확인하고, 기준점은 공사 시 유실방지를 위하여 필히 인조점을 설치하여야 하며, 시공중에도 활용할 수 있도록 인조점과 기준점과의 관계를 도면화하여 비치하여야 한다.

2) 공사 준공까지 보존할 수 있는 가수준점(TBM)을 시공이 편리한 위치에 설치하고 국립지리원에서 설치한 주변의 수준점으로부터 2km 내외 구간마다 왕복 수준측량을 실시하여 공공측량표준작업규정에서 정한 왕복허용오차 범위이내일 경우에 실시하여야 한다.

3) 평판측량은 주변지세를 알 수 있도록 도로폭의 2배 정도 좌우로 실시하여야 한다.

4) 횡단측량은 부지경계선으로부터 주변지형을 알 수 있는 범위까지 측정하여야 하며, 종단이 급변하는 지점(+측점)에 대하여도 필히 실시하여 도면화하여야 한다.

5) 절취면에 암이 노출되어 있는 경우는 필히 토사, 리핑암, 발파암 등의 경계지점을 정확히 측정하여 횡단면도에 표기하여야 한다.

6) 인접공구 또는 기존시설과의 접속부 등을 상호 확인하고 측량결과를 교환하여 이상유무를 확인하여야 한다.

(나) 감리원은 사전 설계도서를 숙지하고 확인측량 시 입회, 확인하여야 하며, 필요시 실시설계 용역회사 대표자의 위임장을 지참한 임직원 등과 합동으로 이상유무를 확인토록 하여야 한다.

(7) 관계자 합동회의 실시

(가) 감리원은 공사관리관과 합동으로 교량 및 배수시설 등의 규격위치 등에 대하여 시공 전에 관계자 합동회의를 실시하고 이를 조정 또는 변경 여부를 검토하여 사후에 민원 등이 야기되지 않도록 하여야 한다.

(나) 감리원과 시공자는 관계자 합동회의를 실시하기 전에 현장을 정밀하게 조사하고, 수리계산서 및 구조계산서 설계도서 등을 숙지하여 그 내용을 관계자에게 설명하여야 한다.

(다) 관계자 합동회의 결과 설계변경이 필요하거나 추가 구조물 설치 등의 건의사항이 타당하면 설계변경 절차에 의거 처리하여야 한다.

(8) 폐기물처리장 및 골재원 등의 선정 및 결과 보고

(가) 감리원은 착공 즉시 설계 시 선정된 폐기물처리장, 석산 및 골재원에 대한 적합여부, 허가가능 여부 및 경제적인 장소 등을 조사 분석하여야 하고 위치가 설계 시 선정된 장소와 상이할 경우에는 발주청장에게 골재원 및 폐기물처리장의 가능량과 운반거리, 현지여건 등 필요한 자료들을 첨부하여 결과․보고하여야 한다.

(나) 시험 결과 불합격 및 허가 불가능 또는 기타의 사유로 인하여 설계위치에서 채취가 불가하거나 부족 될 경우에는 대체가능지역에 대한 필요한 허가원 등을 수급자로 하여금 작성토록 하고 조속히 허가를 득하도록 한다.

(9) 건기법 제24조, 동법 시행령 제41조 및 동법 시행규칙 제15조의2의 규정에 따라 수립된 품질관리(또는 시험)계획을 착공 30일 이내에 공사수급자로부터 제출받아 공종별로 검토하여 발주기관에 제출하여야 한다.

(가) 시험계획

1) 각종 토취장, 골재원, 석산에서 대표시료를 채취하여 시험을 실시한 결과가 시방규정에 부합되는지의 여부를 확인하고 여러 재료를 제시한 후 주변여건 등을 고려하여 발주청장과 협의하여 결정한다.

2) 설계변경이 될 경우에는 즉시 변경계획서를 제출하도록 한다.

3) 시험을 실시하기 이전에 시공을 하지 않도록 하여야 한다.

4) 책임감리원은 당일 시행한 각종 시험성과를 확인하고 품질관리 미이행 또는 불합격된 구간의 시정여부를 확인하여 익일 작업시행 여부를 결정하여야 한다.

(나) 공사수급자의 시험 담당직원의 선임 및 시험장비 비치

1) 공사수급자가 제출한 품질시험 직원의 자격증 소지 여부, 도로분야 시험업무 수행경력 등을 면밀히 검토하여 당해 공사의 품질관리 업무를 원활히 수행할 수 있는지에 대하여 검토 후 발주청장에게 제출하여야 한다.

2) 감리원은 현장품질시험을 철저히 시행하기 위하여 시험장비 및 시험요원을 필히 현장시험실에 비치 및 배치토록 하여야 하며, 그 계획 및 결과를 공사 착공 30일 이내에 제출토록 하여야 한다.

3) 공사수급자의 현장시험 담당직원 및 시공에 따라 필요한 시험기구가 현장에 배치 및 비치되기 전에는 시공을 하지 않도록 하여야 한다.

4) 각종 시험기기는 소정기간 내에 검정하여야 하고 검정필증 및 검증결과에 의한 보정치를 당해 시험기기 상단부위에 잘 보이도록 부착하여야 한다.

(10) 각종 운반거리 확인

(가) 감리원은 골재원, 석산에서 본선까지의 운반거리 및 현장거리를 측정 후 본선과의 연관 약도 등을 작성하여 결과 보고하여야 한다.

(나) 철근 등 한 장소에 집중 보관관리하여야 하는 주요자재의 운반거리는 현장 보관장소와 관리장소까지의 운반거리 및 보관장소와 작업현장까지의 현장 평균운반거리를 별도 측정하여 결과 보고하여야 한다.

(11) 소요장비 협의 결정 및 투입 촉구

감리원은 착공계 제출시의 장비투입계획서상의 장비의 규격, 투입시기 등의 적정성 여부를 면밀히 검토하여야 하며 부적정할 경우에는 장비투입계획의 조정 등 필요한 조치를 취하여야 하며, 또한 필요한 장비를 조속 투입토록 한다.

(12) 금일작업계획 및 명일작업계획서 확인, 검토와 감리일지 및 자재수불부 등의 정리

(가) 감리원은 수급자로부터 금일작업실적서를 제출받는 현장대리인, 공무담당자, 자재담당자, 시험담당 및 노무담당자 등 관계직원 합동으로 금일작업에 대한 실적확인을 하고 시공결과 잘못 시공한 것에 대한 문제점 지적 및 재시공 등의 지시와 이러한 문제점이 재발되지 않도록 하는 대책협의 및 공사추진 상 필요한 공사회의를 실시하고 그 회의결과를 기록 유지하여야 한다.

(나) 감리원은 수급자로부터 작업일지를 제출받아 금일작업 실적과 사용자재량, 품질 시험회수 및 성과 등이 삼위일체가 되는지의 여부를 확인하고, 명일작업 계획량에 대한 사전시험계획과 자재사용계획의 일치여부를 검토 확인하여야 한다.

(다) 금일작업실적서를 확인, 점검할 때는 필히 품질시험 실시여부와 그 성과를 확인하여야 한다.

(라) 당일 작업량, 자재사용량, 시험 시행 등을 확인하고 모두 일치되면 금일작업실적서에 기재된 작업과 자재사용량을 각각 감독일지 및 주요자재 수불부에 기록 정리하여야 한다.

(마) 명일작업계획서를 청구할 때에는 상기관계자와 필히 그 시행상의 가능성 및 각자가 수행하여야 할 사항에 대하여 철저히 협의 검토하여야 한다.

(바) 자재담당자에게 자재불출 상황과 당일 작업종료 후 사용량 및 잔량 유무의 점검을 철저히 하도록 지시하여야 한다.

(사) 명일작업계획서에 의하여 당일 작업이 시행되었는지는 일과 후 필히 점검, 확인하여야 한다.

(아) 감리원은 감리업무 수행 중 생산된 모든 문서에 대해서는 준공 후 발주청장에게 인계하여야 한다.

(13) 자재공급원 승인 검토제출

(가) 감리원은 시공자로 하여금 공정계획에 의거 사전 주요기자재(레미콘, 수문, 철근, 배수관, 강재, 시멘트, 호안블럭 등) 공급원 신청서를 자재 반입 10일 전까지 제출토록 하여야하며, 관련법령의 규정에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인정받은 재료에 대하여는 예외로 한다.

(나) 레미콘 및 아스콘의 공급원 승인 신청시에는 생산공장에서 저장한 골재의 품질 즉 입도, 마모율, 조립율, 염분 함유량 등에 대한 품질시험을 직접 실시하거나 발주기관에 의뢰, 실시하여 합격여부를 판단하여야 하며 공급원의 일일생산량, 기계의 성능, 각종 계기의 정상적인 작동유무, 사용재료의 골재원 확보여부, 동일골재(품질, 형상 등)로 지속적인 사용가능 여부, 현장 도착 소요시간 등에 대하여 사전에 충분히 조사하여 공사기간중 지속적인 품질관리에 지장이 없도록 하여야 한다.

(다) 배수관 등 기성제품에 대하여는 KS 규격품을 사용하여야 한다.

(라) 공급원 승인 후 반입사용자재에 대한 품질시험 및 품질변화 여부 등에 대하여도 수시 확인하여야 한다.

(마) 공급원 승인요청은 2개 이상의 공급원을 제출 및 승인받아 제품의 생산중지 등 부득이한 경우에도 예비적으로 사용할 수 있도록 하여 공사 및 품질관리에 지장이 없도록 하여야 한다.

(바) 각종 재료, 품질 등은 자체 생산 시와 동일하게 충족되어야 한다.

(사) 공급원 승인을 득한 후 구매 사용하여야 한다.

(아) 공급원 승인 시는 업체, 생산공장의 계약조건, 사후품질관리 방법 등을 확보하기 위하여 필히 다음 사항 등이 첨부되어야 한다.

1) 감리자, 업체, 생산공장 합동으로 배합설계 실시

2) 조골재의 형상변화(당초 강자갈→쇄석골재), 세골재의 조립률 변화 또는 골재원이 변경될 때 배합설계를 재실시

3) 수시, 정기점검 결과 시정, 보완이 있을 시는 즉시 이에 응할 것

4) 필히 염분측정기기를 비치하고 매일 측정하고 그 결과를 기록 비치

5) 아스콘 운반중 온도저하를 방지할 수 있는 구체적인 보완방법을 명시하고 이를 준수할 것 (특히 동절기)

6) 레미콘 운반도중 슬럼프 저하 방지를 위한 구체적인 방법을 선택

7) 레미콘 운반시간(생산, 타설시간 감안)을 필히 준수하고 시간이 초과되었을 경우에는 비록 슬럼프치 저하가 없더라도 감리자는 필히 반환조치 지시를 하여야 한다.

8) 운반과정에서 가수할 경우에는 이유 여하를 불문하고 반환 지시를 하여야 한다.

(14) 주요자재 검수

(가) 검수대상 자재는 주요자재로서 레미콘, 호안블럭, 철근, 흄관, 강재 등으로 한다.

(나) 자재공급원을 승인받은 후 자재가 현장에 도착하면 즉시 수급인으로부터 반입된 송장사본을 징구함과 동시에 반입한 자재를 검수하고 그 결과를 기록, 비치하여야 한다.

(다) 자재검수시는 수량확인 뿐만 아니라, 필히 품질변질 여부를 확인하여야 하고 변질되었을 때는 즉시 현장에서 반출토록 하고 반출여부를 확인하여야 하며, 의심스러운 것은 별도 보관토록 한 후 품질시험 의뢰 결과에 의거 검수여부를 확정하여야 한다.

(라) 주요 자재에 대하여는 검수부에 검수결과를 기록, 비치하여야 한다.

(마) 품질시험을 실시하여야 할 경우에는 발주기관 또는 국․공립시험기관에 의뢰하여야 한다.

(15) 수명사항 이행철저

(가) 감리원은 발주청장이 지시하는 공문을 철저히 숙지하여야 되며, 보조감리도 필히 공람하여야 한다.

(나) 공문내용 중 현장대리인이 숙지하여야 될 것은 현장대리인에게 서면으로 통보하여야 하고 이행을 촉구하여야 한다.

(다) 감리원은 발주기관 지시사항을 필히 이행하고 그 결과를 보고하여야 한다.

(라) 지원업무수행자의 확인요구가 있을 시에는 이에 적극 호응하여야 한다.

(16) 콘크리트 품질관리 철저

(가) 콘크리트 배합설계 실시

1) 감리원은 공급원 승인시 배합설계를 수급자, 레미콘 회사 등과 합동으로 배합설계를 실시하여야 한다.

2) 골재의 최대치수 및 소요강도가 동일하더라도 타설 시의 기온, 타설방법 등으로 인하여 슬럼프치가 변경되어야 하므로 표준 슬럼프치 이외에 타설기온(고온시) 및 타설방법에 따라 소요되는 Slump치별로 각각 배합설계를 하여야 한다.

3) 본 공사에 사용될 레미콘의 배합설계는 소요강도별, 타설방법별로 콘크리트 슬럼프치가 다르므로 각각에 대하여 배합설계를 달리 실시하여야 한다.  이 때 같은 강도라도 타설방법에 따라 슬럼프치를 달리하여야 하므로 이를 감안하여야 한다.

4) 현장도착시의 콘크리트 슬럼프치를 기준으로 배합설계하여야 하므로 공장에서 현장도착시까지 운반, 타설하는 데 따른 기온의 영향 등을 추가로 감안하여 배합설계시의 슬럼프치를 결정하여야 한다.

5) 강도 및 타설방법이 동일할지라도 타설시 대기온도에 따라 슬럼프치를 달리 한 배합설계를 실시하여야 한다.

6) 모래(조립률 변화), 자갈의 품질 또는 형상 등이 변화할 때도 필히 배합설계를 재실시하여야 한다.

7) 감리원은 배합설계 완료 결과를 발주청장에게 보고하여야 한다.

(나) 감리원은 구조물 검측시 구조물별, 부위별 슬럼프치 타설시의 온도, 콘크리트의 종류(예 : 25-21-12), 실측     Slump치, 타설시간 등을 반드시 기록, 유지하여야 한다. (책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제6호 서식 참조)

(다) 콘크리트의 타설은 도면에 명기된 타설 순서도, 골재의 최대치수, 소요강도, 소요 슬럼프치, 소요배합(현장배합 수정), 타설방법 등에 따라 시행하여야 한다.

(라) 콘크리트가 응결되는 즉시 모래 또는 톱밥과 같이 장시간동안 보습할 수 있는 재료를 일정두께로 깔고 양생포를 덮은 후 양생기간동안 모래 등이 계속 습윤상태를 유지할 수 있도록 하고 피막양생을 할 경우에는 양생재의 종류와 사용조건, 사용방법, 사용시기, 주의사항 등을 검토하여 적절한 방법을 선택하여야 하는 등 양생방법을 수급자로부터 사전에 제출받아 양생관리가 소홀함이 없도록 감리를 철저히 하여야 한다.

(마) 시험담당 감리원 작업계획서에 의한 시공시 품질관리시험 여부를 반드시 확인하고 시험성과서의 적정여부를 확인, 서명하여 책임감리원에게 보고하여야 한다.

시험성과의 불합격 또는 품질시험의 미실시시에는 후속공사를 착수시키지 말아야 한다.

(바) 수급자는 콘크리트 압축강도별 X-R 관리도 등을 필히 작성토록 하여 콘크리트 품질관리를 철저히 하도록 하여야 한다.

(사) 콘크리트 다짐을 할 때는 구조물의 두께 등에 따라 사용 바이브레이터의 규격을 사전 검토하여야 한다.

(아) 품질확보를 위한 시공계획서를 당해 공사 착수전에 감리원의 승인을 받아서 시공토록 하고 이 때 시공계획에는 콘크리트 부위별로 타설방법, 양생방법, 타설순서, 동일구조물 동일강도라도 부위별로 슬럼프치, 운반과정에서의 슬럼프치 저하 방지대책, 양생방법 등 공사시공 단계별로 공사품질을 확보할 수 있는 방법을 모두 제시하여 감리자의 승인을 받아 시공토록 하여야 한다.

(자) 동절기 콘크리트 작업을 위한 콘크리트 보완장비 등에 대해서는 반드시 발주청장의 사전승인을 득한 후 시공하여야 한다.

(17) 구조물 검토 및 검측 실시

(가) 감리원은 현장조사 기능공 및 기술자들이 구조물의 특히 복잡한 부위에 대한 시공을 동일하게 할 수 있도록 시공자가 시공상세도(SHOP DRAWING)를 작성한 후 당해 구조물을 시공하기 전에 제출하여 이를 검토, 확인하여야 한다.

1) 비계, 동바리 및 가교, 가도 등의 설치상세도 및 구조계산서

2) 구조물의 모따기 상세도

3) 옹벽, 콘크리트 측구의 끝부분 처리도

4) 배수관, 배수문, 교량용 날개벽 등의 설치위치 및 연장규격, 치수 등이 불명확하여 시공에 어려움이 예상되는 부위의 각종 상세도면

(나) 배수문 등 각종 구조물의 구조검토, 시공계획, 시공 시 예상문제 등을 재검토하여야 한다.

(다) 감리원은 최종 검측전에 각종 구조물의 터파기, 철근가공 및 조립, 거푸집 설치과정을 수시 확인, 검측하여야 한다.

(라) 각 작업별 검측을 실시한 후 구조물 검측대장을 작성 비치하여야 한다.

(마) 점검통로가 필요없는 소규모 교량이라 하더라도 교대(ABUTMENT) 또는 교각에 교좌장치를 수시로 용이하게 점검할 수 있는 점검시설 설치와 관련도면을 교량별로 작성토록 하여야 한다.

(바) 토질조사 시 실제로 보링하지 않고 추정치를 사용한 지점을 도면 및 특별시방서에 명기되어 있을 시는 동지점에 대해서 보링을 실시하여 그 결과에 따라 시공하여야 한다.

(사) 교량의 상판 슬래브 콘크리트 타설시 데크휘니셔(DECK FINISHER)를 사용하여 시공토록 하여야 한다.

(아) 본 공사에 소요되는 각종 재료(흄관두께, 본당 표준길이, 강관두께, 내경, 외경, 강재품질 등 기타 재료)의 품질확보를 위한 재료의 소정 품질 및 규격 등을 필히 검토하여야 한다.

(자) 기타 검측시기, 검측빈도, 검측절차, 검측체크리스트 등의 상세한 검측업무는 감리업무수행지침에 따라 철저히 이행하여야 한다.

(차) 배수관 및 배수암거 도면에는 규격별로 표준도만 있을 경우 개소별로 상세한 설계도를 작성토록 하고 각 배수시설마다 콘크리트, 철근, 거푸집 물량을 도면에 명기토록 하여 작업자의 착오가 없도록 검토하여야 한다.

(카) 교량 및 배수암거가 사각(斜角)이 되는 경우에는 예각부에 대한 단부 철근 배근상세도 등을 검토하여야 한다.

(타) 배수암거, 교량 및 배수관의 날개벽에 대해서는 현지지형과 여건에 맞게 설계도 및 전개도를 필히 작성하였는지를 검토하여야 한다.

(파) 배수암거의 연장이 긴 경우에는 필요에 따라 시공 및 신․수축이음의 위치, 구조상세도 작성 및 채움재료의 품질 등을 명기하였는지 검토하여야 한다.

(하) 배수암거의 연장이 길어 콘크리트 타설, 양생 시 발생될 신․수축 등을 고려하여 이음부를 설치할 경우에는 필히 전단부에 단부보강 면벽을 설치하였는지 검토

(갸) 옹벽의 전개도에 이음부 위치 상세도(시공, 신․수축이음) 및 구조상세도를 검토하여야 한다.

(냐) 고정, 이동 교좌설치 위치도(각 교량마다)를 검토하여야 한다.

(댜) 교명주 설치, 신축이음, 난간의 앙카부 등 상세도를 검토하여야 한다.

(랴) 교량 난간기둥 하부철판과 난간기둥의 기초 콘크리트 사이의 틈새에 대한 처리재료, 채움시기, 방법 등에 대한 상세도를 검토하여야 한다.

(먀) 교량의 사후 유지관리를 위한 교량 점검용 시설도면을 검토하여야 한다.

(뱌) 교량에 추후 통신관로, 상수관로, 가스관로 등이 설치될 경우에 미리 대비하여 이를 감안하였는지를 검토 (앵커볼트, 콘크리트 브라켓 설치 등)하여야 한다.

(샤) 기타 유지관리를 위하여 필요한 시설의 설치방법에 대하여 명기하였는지를 검토하여야 한다.

(야) 구조물 도면에 발생가능 균열(CRACK)의 종류, 허용폭 등에 대해 검토하고 균열발생시의 처리방법에 대하여 검토하여야 한다.

(쟈) 상세도로 표시할 수 없는 주의사항(시공 시 유의사항 등)에 대해서는 필히 검토하여야 한다.

(챠) 콘크리트 타설방법, 타설순서, 양생방법을 검토하여야 한다.

(캬) 성토층, 노상면, 동상방지층 및 보조기층 완성면을 검측하여야 한다.

(탸) 주요자재의 공급에 대한 KS 규격, 품질시험 성과 확인 등을 검토하여야 한다.

(퍄) 교량 슬래브 두께가 응력계산상으로는 문제가 없다하더라도 반복하중에 의한 피로응력으로 쉽게 균열이 발생하는 경우가 있으므로 반드시 이점을 고려하여 두께를 결정하였는지를 검토하여야 한다.

(18) 암반선 확인 및 완성면 검측

감리원은 설계시 추정된 암반선에 대하여 시공중 실제 암반선 노출시에 현지확인하고 필요시 시험을 실시하여 실제 암반선을 판정하여야 한다.

설계시에는 물리탐사, 시추조사 및 실내시험성과에 의하여 암을 분류하고 지층 경계선을 추정하나, 현장작업시에는 직접 육안으로 확인하고, 필요한 시험을 실시하여 더욱 정확한 판정을 하여야 한다.

암판정 준비 및 절차는 다음과 같은 요령으로 실시한다.

(가) 암판정 대상

- 구조물 기초 암판정 (암거, 교량 등)

(나) 암판정 요청 체계도

시 공 자	→	현장 감리원	→	암판정 위원회	→	조사 및 판정

(다) 암판정 위원회 구성

암판정 위원은 감리전문회사 지질 또는 토질분야 전문가, 공사관리관, 책임감리원 등으로 암판정 대상 공종의 중요성, 수량, 시공현장 여건 등을 종합적으로 고려하여 수시 구성 운영하며, 시공회사의 담당책임자를 입회토록하여야 한다.

(라) 판정방법

현지확인 자료검토

(마) 준비사항 및 보고방법

구조물 기초 암판정

1) 보고 양식

공 구	구조물명	부 위	E . L		차 이	설계기초 암반종류	설계분포 암반종류
			당 초	변 경

2) 현장준비사항

주상도 작성 : 당초와 변경비교

종평면도

측량성과표

시공계획 (기초에 대한 의견서)

기초 확인측량시 사진촬영 보관 (근경, 원경)

시추 및 굴착에 의한 시료함 보관 (시험실 비치)

(19) 실정보고

(가) 감리원은 시공도중 또는 시공전에 현지여건상 당초 설계대로 시공이 불가능하던가, 구조상 변경이 필요시에는 즉시 수급자에게 변경사항을 대표이사의 명으로 제출받아 이를 확인한 후 의견서를 첨부하여 발주청장에게 신속히 실정보고를 하여야 한다.

(나) 실정보고 후 지시가 있을 때까지는 작업을 시행토록 하여서는 안된다.

(다) 감리원은 공사시공 중 불가항력적인 재해의 발생, 공사중단의 필요성, 설계와 현지실정의 불일치, 감리원의 권한에 속하지 않는 사태가 발생될 경우 육하원칙에 따라 검토의견을 첨부하여 발주청장에게 현장실정을 상세하게 보고하여야 한다.

(20) 시공 후 매몰부분에 대한 조치

감리원은 시공 후 매몰되어 추후 확인할 수 없는 부분에 대하여는 필히 사진(3매) 또는 비디오로 촬영토록 하여 이를 보관하였다가 준공 후 발주기관에 제출하여야 한다.

(21) 공사진척 광경 사진촬영

(가) 감리원은 공사착수전에 주요부분에 대한 전경사진을 촬영 비치토록 하여야 한다.

(나) 촬영할 시는 필히 지형을 포함한 전경 및 세부광경을 촬영토록 하여야 한다.

(다) 특히 구조물을 암반 위에 설치하여야 될 경우에는 필히 암반임을 확인하는 촬영기록을 보관하였다가 준공 시 발주기관에 제출하여야 한다.

(라) 사진첩은 토공, 배수공, 가시설공, 구조물공, 교량공 등으로 구분하여 작업순서대로 일목요연하게 작업광경을 알 수 있도록 촬영하여 보관하여야 한다.

(마) 각 광경마다 사진 설명을 기재하여야 한다.

(바) 위 항의 필름을 포함한 사진첩 2부를 발주청장에게 제출토록 한다.

(22) 민원사무

(가) 감리원은 민원이 야기될 수 있는 요소를 사전발견, 긍정적으로 처리함으로서 민원이 야기되지 않도록 하여야 하며 수급자에게도 동일내용을 지시하여야 한다.

(나) 발주청장으로부터 민원에 관하여 현지조사 및 대책검토 등의 명령이 있을 경우에는 필히 기일 엄수하여 조사내용 및 검토의견서를 제출토록 하여야 한다. (필요시 사진 첨부)

(다) 불가피하게 기일을 엄수하여 보고하지 못할 경우에는 그 사유를 첨부한 중간보고(제출기일 2일전)를 하여야 한다.

(라) 감리원이 민원에 대한 정보를 사전입수한 경우에는 지원업무수행자에게 즉시 보고함과 동시에 민원발생 원인 및 대책 등을 수립하여 사전 대처하여야 한다.

(마) 민원인이 감리원 또는 현장관계자와 면담요구가 있을 시에는 요구사항을 친절, 성실하게 청취하고, 현 설계내용을 상세히 설명하여 이해 설득시키거나 개선함이 명확히 타당할 시에는 조치할 의사를 표시하여야 하며, 검토하여야만 할 경우에는 민원내용, 현지여건 및 검토의견을 지원업무수행자와 협의하여 발주기관에 즉시 보고 후 결과에 따라 조치할 계획임을 민원인에게 설명하여야 한다.

(바) 감리원은 감리용역의 과업범위 내에서 각종 인․허가 사항이 허가내용대로 이루어지고 있는지의 여부를 감리(지도, 감독)하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 본 공사의 감리대가에 포함된 것으로 간주한다.

(23) 안전관리 및 환경관리

(가) 감리원은 공사수행에 따른 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 수급자가 수립한 안전관리 대책의 적정여부를 검토하여야 한다.

(나) 수급자의 안전관리 점검상황을 재점검하여야 하며, 수급자의 안전관리 이행사항을 직접 현지점검 및 확인하고 그 기록을 비치하여야 하며, 기록을 증명할 수 있도록 각종 안내표지판 등이 설치된 장면을 사진촬영하여 30일 간격으로 동일 장소에서 촬영한 사진을 준공 시 제출하여야 한다.

(다) 설계에 계상된 안전관리비 사용실적을 확인하고 그 결과를 비치하여야 한다.

(라) 수급자가 현장 종사자들에게 수시 및 정기 안전교육을 실시하도록 하여야 한다.

(마) 시공구간 내 위험개소에는 필히 안전조치를 취하고 안내간판을 설치토록 하여야 한다.

(바) 기존 통행로의 교차지점 및 복잡한 작업장에는 안전시설 및 신호수를 배치토록 하여야 한다.

(사) 가시설 설치 등 위험작업시는 안전헬멧을 항시 착용토록 하고 안전관리 표지 설치 및 필요시 교통 통제원을 배치토록 하여야 한다.

(아) 감리원은 수급자로부터 세부공종별 안전관리계획서를 제출토록 하여 안전관리 계산서 및 시방서와 연계하여 안전상 문제점을 사전에 검토하고 수급자에게 필요한 조치를 취하도록 하여야 한다.

(자) 수급자가 제출한 현장 안전관리자의 자격기준 및 경력 등을 검토하여 적임 여부에 대한 의견서를 첨부하여 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

(차) 감리원은 산업안전보건법에 의한 모든 안전관리 지침사항에 대하여 이행하여야 하며, 현장감리원의 과실로 인한 안전관리사항에 대하여 책임을 져야 한다.

(카) 감리원은 공사로 인하여 대기 및 수질오염, 악취, 분진, 소음, 진동 등 환경오염이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(24) 체불노임 등의 원인

(가) 현장감리원은 수급자의 임금지불대장을 수시 확인하여야 한다.

(나) 확인결과 임금 미불이 있을 시는 즉시 미불을 해소토록 촉구하여야 되며, 이에 대한 대책을 수립하여 발주청장에게 보고하여야 한다.

(25) 하도급 처리의 지도감독

감리원은 하도급에 대하여 발주기관의 장의 요구사항 또는 아래 사항을 검토하여 그 의견을 제시하여야 한다.

(가) 감리원은 시공자가 도급받은 건설공사를 건설산업기본법 제29조, 제30조, 공사계약 일반조건 제42조의 규정에 의거 하도급하고자 발주청장에게 통지하거나, 동의 또는 승낙을 요청하는 사항에 대해서는 다음 각 호의 사항에 관한 적정성 여부를 검토하여 발주청장에게 제출하여야 한다.

1) 하도급자 자격의 적정성(하도급실적, 재무구조, 보유장비, 기술인력사항 등 검토)

2) 하도급 통지기간 준수 등

3) 저가 하도급에 대한 검토의견서 등(검토의견서는 반드시 증빙자료에 근거하여 작성하여야 한다.)

(나) 감리원은 (1)항에 의거 처리된 하도급에 대해서는 시공자가 건설산업기본법 제34조 내지 제38조 및「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 규정된 사항을 이행하도록 지도, 확인하여야 하며 또한 건설산업기본법 제30조 제1항에  규정된 전문건설공사 하도급비율을 준수하도록 착공단계부터 관리하고 지도, 확인하여야 한다.

(다) 감리원은 시공자가 하도급 사항을 (1)항 및 (2)항에 의거 처리하지 않고 위장 하도급하거나, 무면허자에게 하도급하는 등 불법적인 행위를 하지 않도록 지도하고, 현장입구에 “불법하도급 행위 신고표지판”을 시공자에게 설치하도록 하여야 한다.

(라) 계약단가를 기준으로 82% 미만의 하도급 금지 및 노임과 자재를 적기에 지급토록 하여야 한다.

(26) 신규단가 및 산출서 검토

(가) 감리원은 시공도중 설계된 공종 즉 단가가 없는 신공종이 발생될 시는 즉시 수급자로 하여금 신규단가 (산출서 포함)를 제출토록 하고 내용검토하여 의견서를 첨부, 발주기관에 제출하여야 한다.

(나) 신규단가는 수급자가 제출한 단가산출서 내용 중 인용할 수 있는 것은 인용토록 하여야 한다.

(27) 현장 내 발생된 문제점 검토 등

(가) 감리원은 감리대상 공사가 장기계속공사일 경우 당해년도 계약구간 이외의 공사구간에 대하여도 수시로 현장을 순찰하여 타관련 공사시행 등으로 인한 중복공사 발생방지를 공사수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

(나) 또한 공사시행 중 발생되는 기술적인 검토사항과 문제점에 대하여는 해당분야별 기술지원감리원으로 하여금 현지확인 검토(필요시 현장시험 등 실시)후 보고서를 책임감리원이 제출받아 공사시행계획을 수립 보고하여야 한다.

(28) 응급조치

(가) 감리원은 설계도서에 명시된 차량을 감리․감독용으로 반드시 현장에 투입하여야 한다.

(나) 감리원은 태풍피해, 천재지변 등 불가항력적으로 공사구간에 피해가 발생되어 이를 즉시 보수치 않고 방치함으로써 교통두절 등 제반 문제점이 야기될 경우에는 즉시 응급조치토록 함과 동시에 보고하여야 한다.

(다) 응급조치할 시는 사전에 피해량 조사, 피해도면 작성, 세부 및 전경사진을 촬영토록 하여야 한다.

(29) 기존 구조물 철거

(가) 기존 구조물을 철거할 시는 수급자가 현황도(도면, 철거 구조물 수량산출서) 및 현황사진을 작성하여 제출토록 하고 이를 확인점검하여 발주기관에 보고하고 설계변경시 계상하여야 하며, 철거 구조물의 도면작성은 다음과 같다.

1) 측면도

2) 단면도

3) 상세도 (수량산출시 필요함)

4) 평면도

5) 기타 수량산출시 필요한 사항

(30) 폐천부지량 보고

(가) 책임감리원은 공사로 인하여 발생된 폐천부지에 대한 활용여부를 조사하여 폐천부지 관리에 관한 계획을 수립하여야 한다.

(나) 폐천부지 활용을 위한 현장조사시에는 관할 지방자치단체의 관계기관을 참석시켜 의견을 들은 후 폐천부지 면적, 크기, 모양 또는 지형여건에 따라 활용여부를 판단하여야 한다.

(다) 활용여부 검토 후 폐천부지에 대하여 분할측량(행정조치에 대하여는 기초자료를 작성하여 발주청장에게 보고)을 실시하여 용지도를 작성하고 지적도, 등기부등본, 토지대장(임야대장), 폐천부지조서 및 활용방안 등 서류 3부를 공사준공 2개월전까지 발주청장에게 제출하여야 한다.

(31) 지장물 철거

감리원은 가옥 등의 지장물 조서가 작성되면 철거 전에 배경을 넣은 사진을 촬영하고 철거 후에 광경사진을 촬영하여(동일지점) 사진첩을 작성하여 보고하여야 한다.

(32) 설계변경 시 조치사항

(가) 감리원은 수급자가 그간 제출한 실정보고 등으로 인한 물량변경은 물론, 추후 시공 시 변경될 수 있는 설계변경 요인을 사전 충분히 도출하여 설계변경함으로써 회수를 최대한 줄일 수 있도록 하여야 한다.

1) 현장 정밀조사를 실시하여 민원사항 및 우회도로, 교차방법 등 시설 개선사항 등을 최대한 도출

2) 발주기관에서의 변경, 지시사항 및 기타 변경이 불가피한 사항을 최대한 반영

(나) 설계변경은 감리원 책임하에 실시하여 감리회사 대표이사 명의로 발주기관에 제출한다.

<설계변경 절차>

			감 리 회 사								발 주 기 관
설 계 자 (책임감리원)			심 사 자 (기술지원감리원)			설계변경 도서 제출 (감리회사 대표이사 → 발주기관의 장)			검 토 (공사관리관)				결 재 (과장,국장,청장)

(33) 보고사항

(가) 정기보고

1) 월간 또는 분기 감리보고서 (감리보고서로 대체)

감리원은 다음 사항을 포함한 감리보고서를 매월(분기)마다 발주청장에게 제출하여야 한다.

보고서의 제출기한은 다음달 5일 이내로 한다.

가) 공사추진현황 등(별지 제1호 내지 제3호 서식)

나) 감리원 업무일지(별지 제4호서식)

다) 품질시험․검사대장(별지 제5호서식)

라) 구조물별 콘크리트 타설현황(작업자 명부를 포함한다)(별지 제6호서식)

마) 검측요청․결과통보내용(별지 제7호서식)

바) 주요자재 검사 및 수불내용(별지 제8호서식)

사) 공사 설계변경 현황(별지 제9호서식)

아) 주요구조물의 단계별 시공현황(별지 제10호서식)

자) 콘크리트 구조물 균열관리 현황(별지 제11호 서식)

차) 공사사고 보고서(별지 제12호 서식)

2) 최종 감리보고서

감리원은 다음 사항을 포함한 최종 감리보고서를 감리기간 종료후 14일 이내에 감리전문회사 대표이사 명의로 발주청장에게 제출하여야 한다.

가) 건설공사 및 감리용역 개요 등(별지 제13호 내지 제15호 서식)

나) 공사추진내용 실적(별지 제16호 서식)

다) 검측내용 실적 종합(별지 제17호 서식)

라) 품질시험․검사실적 종합(별지 제18호 서식)

마) 주요자재 관리실적 종합(별지 제19호 서식)

바) 안전관리 실적 종합(별지 제20호 서식)

사) 분야별 기술검토 실적 종합(별지 제 21호 서식)

아) 우수시공 및 실패시공 사례(별지 22호 서식)

자) 종합분석(별지 23호 서식)

(나) 수시보고

감리원은 다음 각 호의 사항을 검토하고 필요시 의견을 첨부하여 발주청장에게 보고하여야 한다.

1) 다음 각 호의 시공자 제출서류

가) 착공 신고서

나) 공정 현황 보고

다) 지급자재 수급요청서 및 대체사용 신청서

라) 주요기자재 공급원 승인요청서

마) 품질시험․검사대장

바) 품질시험․검사 실적보고서

사) 각종 시험성적표

아) 설계변경 여건보고

자) 준공기한 연기신청서

차) 기성, 준공검사원

카) 하도급 통지 및 승인요청서

타) 현장실정 보고서

파) 안전관리 추진실적 보고서 (안전관리 활동, 안전관리비 사용실적 등)

하) 확인측량 결과보고서

갸) 명일 작업계획서

냐) 물량 확정보고서 및 물가 변동지수 조정률 계산서

댜) 품질관리계획서 또는 품질시험계획서

랴) 발파계획서

먀) 기타 필요한 서류 및 도표 (천후표, 온도표, 수위표, 조위표)

뱌) ‘원가계산에 의한 예정가격 작성준칙’에 대한 공사원가계산서상의 건설공사 관련 보험료 및 건설근로자퇴      직공제부금비 납부내역과 관련 증빙자료

2) 다음 각 호의 현장상황 보고서 (현장 긴급사항)

가) 감리원은 공사 시공 중 불가항력적인 재해의 발생, 공사중단의 필요성, 감리원의 권한에 속하지 않는 사태가 발생될 경우 육하원칙에 따라 검토의견을 첨부하여 발주청장에게 현장상황을 신속히 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

나) 감리원은 공사현장에 다음 사태가 발생하였을 때에는 필요한 응급조치를 취하는 동시에 상세한 경위를 발주청장에게 보고하여야 한다.

a. 천재지변 등 기타의 사유로 공사현장에 피해가 발생하였을 때 또는 장기간 공사시공이 불가능할 때 공사현장의 피해에 대하여 응급조치가 필요할 시는 사전에 피해량 조사, 피해 상세도면 작성, 세부 및 전경사진을 촬영하여 두어야 한다.

b. 시공자의 현장대리인이 사전승인없이 3일 이상 현장에 상주하지 않을 때

c. 시공자가 정당한 사유없이 공사를 중단할 때

d. 시공자가 공사시행을 불성실하게 하거나 감리원의 정당한 지시에 불응할 때

e. 시공자가 계약에 따른 시공능력이 없다고 인정되거나 공정이 현저히 미달될 때

f. 기타 공사추진에 지장이 있을 때

3) 재시공 및 공사중단 명령을 한 때

가) 법 제28조의4의 규정에 의하여 감리원은 시공자가 건설공사의 설계도서, 시방서, 기타 관계서류의 내용과 적합하지 아니하게 당해 건설공사를 시공하는 경우에는 재시공, 공사 중지명령, 기타 필요한 조치를 할 수 있다.

나) 감리원으로부터 재시공, 공사중지명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받은 시공자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

다) 감리원이 시공자에게 재시공, 공사 중지명령, 기타 필요한 조치를 취한 때에는 지체없이 이에 관한 사항을 당해 건설공사의 발주청장에게 보고하여야 한다.

라) 발주청은 감리원으로부터 제3항의 규정에 의한 재시공, 공사 중지명령, 기타 필요한 조치에 관한 보고를 받은 때에는 이를 검토한 후 시정여부의 확인, 공사재개 지시 등 필요한 조치를 하여야 한다.

마) 발주청은 가)항의 규정에 의한 감리원의 공사중지명령 등의 조치를 이유로 감리원 들의 변경, 현장상주의 거부, 감리대가 지급의 거부․지체, 기타 감리원에게 불이익한 처분을 하여서는 안된다.

바) 재시공 및 공사중지 지시 등의 적용한계는 다음 각 호와 같다.

a. 재시공 : 시공된 공사가 품질확보상 미흡 또는 위해를 발생시킬 수 있다고 판단되거나 감리원의 검측․   승인을 받지 않고 후속공정을 진행한 경우와 관계규정에 재시공을 하도록 규정된 경우

b. 공사중지 : 시공된 공사가 품질확보상 미흡 또는 중대한 위해를 발생시킬 수 있다고 판단되거나, 안전상  중대한 위험이 발견될 시에는 공사중지를 지시할 수 있으며 공사중지는 부분중지와 전면중지로 구분한다.

ㄱ. 부분중지

○ 재시공 지시가 이행되지 않는 상태에서는 다음 단계의 공정이 진행되므로 하자 발생이 될 수 있다고 판단될 때

○ 안전시공상 중대한 위험이 예상되어 물적, 인적 중대한 피해가 예상될 때

○ 동일공정에 있어 3회 이상 시정지시가 이행되지 않을 때

○ 동일공정에 있어 2회 이상 경고가 있었음에도 이행되지 않을 때

ㄴ. 전면중지

○ 시공자가 고의로 건설공사의 추진을 심히 지연시키거나, 건설공사 부실 발생우려가 농후한 상황에서 적절한 조치를 취하지 않은 채 공사를 계속 진행하는 경우

○ 부분중지가 이행되지 않음으로서 전체공정에 영향을 끼칠 것으로 판단될 때

○ 지진, 해일, 폭풍 등 천재지변으로 공사를 계속할 시 공사전체에 대한 중대한 피해가 예상될 때

○ 전쟁, 폭동, 내란, 혁명상태 등으로 공사를 계속할 수 없다고 판단되어 발주청장으로부터 지시가 있을 때

4) 시공자가 다음 사항의 불법하도급 행위를 한 때

가) 하도급 통지 또는 승인사항에 위반하여 하도급하거나 일괄 하도급하는 경우

나) 하도급업체가 재하도급하는 경우

다) 발주기관이 시공자에게 선금급, 기성금, 준공금을 지불한 경우 시공자가 하도급자에게 선금급, 기성금, 준공금의 내용과 비율에 따라 법정기간내에 지불하지 아니한 경우

라) 하도급 대금지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생한 경우

마) 기타 시공과 관련하여 중요하다고 인정되는 사항이 있을 때

a. 지급자재의 잉여자재가 발생한 경우

b. 지급자재가 유실, 망실되는 경우

c. 현장대리인 및 하도급자 등의 교체가 필요한 때

d. 세부공정계획, 시공자의 현장기술자 확보사항, 기타 공사계획에 관한 사항을 검토한 결과 공사진행상 문제가 있다고 판단되는 경우

(34) 공정관리

감리원은 당해 공사가 정해진 공기내에 설계도서 등에 의거하여 완성될 수 있도록 지도, 감독하여야 한다.

(가) 감리원은 시공자가 제출한 공정계획이 공사의 종류, 특성, 공기 및 현장의 실정 등을 감안하여 수립되었는지를 검토, 확인하고, 시공의 경제성과 품질확보에 적합하게 실행성 있는 최적공기가 되었는지를 검토하여야 한다.

(나) 공사추진이 부진하여 공기 내 준공에 지장이 예상될 경우에는 공정 만회대책을 수립하여 시공자에게 장비, 인원 등의 추가투입을 지시하여야 한다.

(다) 공사추진상 문제가 있다고 판단될 경우에는 발주청장에게 검토의견을  첨부하여 보고하여야 한다.

(라) 공사가 현장실정에 따라 공기연장이 불가피할 경우, 공기 연장사유가 타당성이 있는지 여부를 검토한 의견서를 첨부하여 발주청장에게 보고하여야 한다.

(마) 감리회사의 귀책사유로 공정이 늦어지게 되어 감리기간이 늘어나게 된 때에는 당초 계획기간 이외의 근무기간 동안은 감리용역비를 지급받지 못한다.

(바) 공사기간을 막연하게 산정하지 않고 CPM 공정계획 등에 의거 정확하고 합리적으로 산정토록 하여야 한다.

(35) 감리원은 현재 수행중인 감리용역의 전체 과업의 범위 중 이미 준공된 부분에 하자(장기계속공사의 전차분)가 발생하였을 때에는 수급자가 제출한 보수방법 등의 적정여부를 검토하여야 하며, 하자보수시에는 감독을 철저히 하여야 한다.

(36) 각종 일지정리 (건기법 및 동법시행 규칙에 준함)

(가) 책임감리원은 공정현황, 기자재 검토, 하도급, 안전관리, 발주기관의 지시사항 등에 대한 서류 및 도표를 작성하여 비치하고 준공 시 발주청장에게 제출하여야 한다.

(나) 공사 감리일지

책임감리원은 수급자에게 아래 서식에 의한 금일 작업실적 및 명일 작업계획서(이하 “작업일지”라 한다)를 제출받아 금일 작업실적인 시공량, 사용자재량, 품질시험 회수 및 성과 등을 종합적으로 검토, 확인하고 확인된 물량을 감리일지에 기재하여야 하며, 명일 작업계획의 적정여부, 사용자재 불출, 시험계획 등을 검토 확인하여 명일 작업시행 여부를 결정하여야 한다.

공 사 명 :                                                      2013.     .     .     현장대리인     (인)

금 일 작 업 실 적	명 일 작 업 계 획	비 고
공 종	공 종
위 치	위 치
시공량	시공량
품질시험 회수 및 성과	품질시험 계획
자재사용량	자재사용량
기타 필요사항	기타 필요사항

	보 조	책임감리	결재

(다) 일일업무 수행일지

1) 책임감리원과 보조감리원은 당일 작업계획서 등에 따라 각자가 수행한 업무내용을 기록한 일지 즉, 일일업무 수행일지(이하 “일지”라 한다)를 개인별로 작성하여야 한다.

2) 책임감리원은 수급자의 작업실적과 당일 감리업무계획을 비교 검토하여 수급자의 작업실적에 부응되도록 각 보조감리원이 감리업무를 적정하게 수행하였는지의 여부를 확인하는 등 감리 개인별로 작성한 감리업무 수행일지를 총괄한 종합일지를 작성, 비치하여야 하며, 종합일지의 주된 내용은 월간 보고서에 수록하여야 한다.

(라) 명령부

1) 책임감리원은 발주청장이나 발주기관으로부터 명령을 받았을 때에는 직접 조치할 사항은 직접 조치하고, 수급자가 조치하여야 될 사항은 문서로 지시하여 이행여부를 확인하고, 명령에 대한 처리결과를 즉시 보고하여야 한다.

2) 명령한 사항의 처리에 장기간이 소요될 경우에는 조치계획 및 추진일정을 즉시 제출하여야 하며, 조치 완료시에는 최종결과를 즉시 보고하여야 한다.

(마) 지시부

1) 책임감리원은 명령받은 사항중 수급자에게 지시할 사항 또는 금일 작업 중 시정하여야 될 사항 등에 대하여는 수급자에게 6하 원칙에 의한 지시부를 발송하여야 하며, 단기간 내 시정을 요구한 사항은 신속히 조치결과를 보고토록 하고, 조치에 장기간이 소요되는 내용은 조치계획 및 추진일정을 수급자로부터 제출받아 단계별 조치내용을 확인하고 최종 조치결과 보고를 확인하여 공사추진에 철저를 기하여야 한다.

2) 책임감리원은 공사시행 중 발견된 시정사항에 대하여는 즉시 시정토록 지시부를 발송하여 즉시 시정토록 하고 시정이 완료될 때까지 후속작업을 시공하지 않도록 하여야 하며, 수급자로부터 시정완료 일시 및 조치내용이 기록된 회신공문을 제출받는 즉시 확인하여 후속작업 추진에 지장이 없도록 하여야 한다.

(바) 발생품 정리부

1) 공사구간 내 기존 도로상의 모든 부대시설물은 공사기간 중에 관리 보호되어야 하므로, 수급자가 이를 철저히 이행하는지 여부를 감리원은 확인하여야 한다.

2) 기존도로의 이정표, 행정구역 표시 등 각종 표지판 철거시에는 이를 보관하여 해당 국도유지 및 관계기관 등에 이관토록 하고 인수증을 수급자로부터 제출받아 확인하고 그 결과를 발주기관에 보고하여야 한다.

3) 기존 구조물 철거 시 발생되는 발생품에 대하여 수량, 규격을 확인하고 보관관리가 용이한 곳에 운반토록 하며, 발주기관에 보고하여 그 지시에 따라야 한다.

(사) 주요자재 수불부 정리

1) 감리원은 주요자재 현황을 파악하기 용이하도록 일정장소에 보관하여야 하며, 특히 철근은 재질(연․고강) 및 규격별로 구분하여 한 곳에 저장, 가공하여 명일 작업계획에 따라 운반, 조립토록 하고 잔량 발생시에는 저장장소로 운반토록 하여야 하며, 금일 사용실적을 작업일지에 기록하여야 한다.

2) 확인된 주요자재 사용량을 당일 즉시 자재수불 상황부에 기재하고 책임감리원은 확인, 날인을 하여야 한다.

3) 주요자재 수불상황부 첫 장에 가시설 설치, 흄관(파형강관)의 암거에 사용되는 주요자재량을 규격별로 1m당 소요량 등을 첨부하고, 레미콘, 아스콘 등 구입자재 사용 시에는 배합표에 의한 소요량을 기록하여 현지 확인 시 정확한 사용량을 알 수 있도록 하여야 한다.

4) 명일 작업계획서 내용을 검토하여 사용계획량만을 출급하고 금일 작업실적에서 확인된 미사용 주요 자재량은 명일 사용계획에서 제외한 양을 출급하여야 한다.

(37) 준공도면

(가) 공사를 준공할 때는 필히 준공도면(KS F1001에 의한 KS A5201의 A1 크기)을 3부 작성하여 발주청장에게 제출하여야 한다.

(나) 준공도면에는 책임감리 현장참여자 업무지침서를 참조하여 실제 시공한 표고 및 규격 등을 작성하여야 한다.

(다) 책자형 축소준공도면(A3 [297×420m/m] 크기)은 3부를 작성하고 그 표지는 가죽 또는 비닐재질 등을 사용하여 장기보관 시 훼손되지 않도록 하여야 한다.

(라) 준공도서는 「전자설계도서 작성․납품지침(도로․하천분야)」에 따라 작성하여 CD, DVD 등 전자매체로 납품하여야한다.

(마) 책임감리원은 상기 준공도면과 준공도서를 수급자로 하여금 작성토록 하고 그 결과를 기술지원감리원과 합동으로 점검 확인 검토하여 발주관서에 제출하여야 한다.

(38) 토석정보공유시스템(EIS)의 활용 등

계약상대자(감리원)는 토석에 대한 설계변경 요인이 발생할 경우 토석정보공유시스템(EIS)을 활용하여 최적의 설계가 되도록 감리에 철저를 기하여야 하며, 그 내용에 변경 또는 수정사항이 있는 경우에는 이를 토석정보공유시스템(EIS)에 등재할 수 있도록 발주자에게 통보하여야 한다.

6.  기타

상기 각항 과업지시서 내용은 건설기술관리법 및 책임감리 현장참여자 업무지침서를 기초로 하여 작성된 것이므로 상세한 내용은 건설기술관리법 및 책임감리 현장참여자 업무지침서를 숙지하고 이행하여야 한다.

7.  발주 기관의 근태점검 등

(1) 발주기관의 장은 건기법 시행령 제52조의 3 규정에 의거 소속직원을 공사관리관으로 임명하여 현장에 상주시킬 수 있으며, 공사관리관은 공사의 원활한 추진을 위하여 감리원에게 필요한 사항 또는 잘못된 사항 등을 시정하기 위한 지시에 모든 감리원은 정당한 사유가 없는 한 충실히 따라야 하며 공사관리관의 임무는 다음과 같다.

(가) 감리자에 대한 지도, 감독 (근태사항 확인점검 등)

(나) 책임감리용역의 기성 및 준공검사

(다) 감리원이 수행할 수 없는 공사와 관련한 각종 관․민원업무 및 인허가 업무를 해결하고, 특히 지역성 민원해결을 위한 합동조사, 공청회 개최 등을 추진

(라) 설계변경, 공기연장 등 주요사항 발생 시 발주청으로부터 검토 지시가 있을 경우 현지 확인 및 검토보고

(마) 공사 관계자 회의 등에 참석, 발주청의 지시사항 전달 및 공사수행상 문제점 파악보고

(바) 기성검사 및 준공검사 시 입회

(사) 준공도서등의 인수

(아) 하자발생시 현지조사 및 사후조치

(2) 발주청장은 공사관리관을 임명하여 감리원의 근태점검을 수시로 실시할 수 있으며, 근무시간 중에 사전승인 등의 절차없이 근무지를 무단이탈하는 사례가 일정회수 이상 적발되는 감리원은 관계규정에 따라 소정의 불이익 처분을 받아야 한다.

(3) 감리원의 업무수행 능력부족 또는 고의, 과실 등으로 공사 실정보고 및 설계변경 지연, 공사검측 지연, 기성검사 지연, 기타 골재원, 토취장 등의 위치변경 승인지연 등의 사실이 발견되어 발주청장이 해당 감리원을 교체 지시한 경우에는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

감리원의 자격 (건기법 시행령 제51조의 2 제1항 관련)

< 별표 1 >

등급	기술자격자	학력·경력자
수석감리사	·감리사 등급 기준을 충족한 자로서 10년 이상 건설공사업무를 수행한 자
감리사	·기술사 또는 건축사 ·기사의 자격을 취득한 자로서 9년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·산업기사의 자격을 취득한 자로서 12년 이상 건설공사업무를 수행한 자
감리사보	·기사의 자격을 취득한 자 ·산업기사의 자격을 취득한 자로서 2년 이상 건설공사업무를 수행한 자	·석사 또는 박사학위를 취득한 자 ·학사학위를 취득한 자로서 2년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·전문대학을 졸업한 자로서 5년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·고등학교를 졸업한 자로서 8년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·국토해양부장관이 정하는 교육기관에서 1년 이상 건설기술 관련 교육과정을 이수한 자로서 10년 이상 건설공사업무를 수행한 자

< 별표 2 >

출     근     부

20○○.  ○월분

일 자 성 명		1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일
		17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일
책 임 감 리 원
○ ○ ○
보 조 감 리 원
○ ○ ○
보 조 감 리 원
○ ○ ○
공사관리관	일 자
확 인 란	확 인

(작성 및 기재요령)

규격은 가로 29.7cm, 세로 21.1cm 용지에 횡으로 작성

감리원 전원을 기재함.

감리원 본인이 직접 자필로 서명(도장은 인정 안됨)하여야 하며, 서명은 형식적이 아닌 실제 쓰고 있는 서명이어야 함.

공사관리관은 해당 현장에 실제 근무한 일자에만 확인하되, 확인란 상단의 “일자”에 날짜를 기재하고, 하단 “확인”란에 출근사항 기재 및 서명함.

Ⅳ. 보 안 및 기 타 유 의 사 항

Ⅳ.  보안 및 기타 유의사항

1.  국가보안상 중요하다고 생각되는 모든 기록과 자료는 시건장치가 되어 있는 함에 보관하고 열쇠는 책임감리원이 소지하여야 한다.

2.  모든 비밀문서는 관리번호를 부여하고, 보관관리기록부에 기록한 후 시건장치가 이중으로 되어 있는 함에 보관하여 열쇠는 책임감리원이 소지하여야 한다.

3.  감리원은 본 업무와 관련 있는 모든 기록과 자료에 대하여 업무와 관련 없는 일에 사용할 수 없으며, 발주기관장의 사전 서면승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

4.  편집된 모든 도서 및 기타 재료를 다른 목적에 이용 또는 이용토록 할 수 없으며, 감리업무 수행 중 취득한 사실을 누설하여서는 안되며 누설로 인하여 문제점이 발생될 시에는 감리원은 물론 감리전문회사가 모든 책임을 진다.

감리대상 공사현황

공 사 명	2013년 공사비(억원)	공 사 명	장래분 공사비(억원)	비고
남지지구 저수호안 보강공사	11	양산지구 저수호안공사	12
원동지구 저수호안 보강공사	15	남지지구 저수호안공사	10
양산지구 저수호안 보강공사	43	창녕지구 자전거길 보강공사	8
외산지구 저수호안 보강공사	13	청암배수문 등 12개소하천시설정비공사	5
성산배수문 등 10개소 하천시설 정비공사	5	합천지구 자전거길 보강공사	3
용산지구 저수호안보강공사	10	낙동강 자전거길 보수보강공사	5
계	97		43