Light Up Tomorrow  !!!!!                             2013. 11

2015 광주하계유니버시아드대회

- 선수촌 부대시설 설치공사 -

기본 및 실시설계용역 과업지시서

	2015광주하계유니버시아드대회조직위원회 【시 설 부】

목   차

제1장 과업 일반사항	1

1. 설계의 개요

2. 설계용역의 일반사항

3. 법령등의 적용 및 시방서 작성기준

제2장 과업 진행사항	8

1. 설계도서 작성

2. 설계진행시 제출서류

3. 업무보고 및 회의

제3장 과업 지침	11

1. 일반사항

2. 설계 일반지침

3. 설계 세부지침

4. 설계도서의 분리작성

5. 설계도서 표기

6. 도면작성

7. 설계기준 및 참고자료

8. 기술심의 및 설계자문

9. 총사업비 관리

10. 사업계획변경 및 시행자 사업계획의 승인 등

제4장 설계도서 납품목록	21

제5장 관련서식	23

1. 보안각서

2. 책임기술자 선임계

3. 설계검사원

4. 주간공정보고

5. 월간공정보고

제6장 과업예정공정표	28

제 1 장  과업 일반사항

1. 설계의 개요

가. 과업명칭

본 과업의 명칭은 2015광주하계유니버시아드대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계 용역이라 한다.

나. 과업의 목적

2015년 광주하계유니버시아드 대회의 성공적인 개최를 위해 광주 서구 화정․염주지구에 위치한 선수촌 APT에 FISU요구사항을 수용하고 관련규정을 준수하여 편리하고 쾌적한 선수촌 부대시설 설치방안 제시와 원활한 교통처리계획을 모색하기 위한 기본 및 실시설계 용역을 수행 하는데 그 목적이 있다.

※ 선정된 업체는 사업비 절감 방안을 마련하여 제시하여야 한다.

다. 과업의 위치

광주광역시 서구 화정․염주지구 선수촌 APT단지내

다. 과업의 범위

1) 과업기간

착수일로부터 270일(9개월) [기본설계(150일) 5개월, 실시설계(120일) 4개월]

2) 과업규모

가) 대상부지 : 총 156,361㎡

나) 숙소/부대시설 : 총 28동 2,948세대 / 227,439㎡

- 화정지구 : 공동구역, 국제구역, 운영구역, 선수촌, 미디어촌 등

- 염주지구 : 출입통제센터, 문화광장, 주차장, 토산품전시장 등

※ 단, 선수촌 부대시설의 효율적인 운영과 편의 제공하기 위해 규모의 증․감이 있을 수 있음.

3) 내용적 범위

가) 토목․건축․기계․전기․통신ㆍ소방 전 분야의 설계지침에 따른 기본 및 실시설계도서의 작성

나) 설계용역 기간 중 배치계획 및 규모 확정을 위한 FISU와 협의, 사업계획변경, 시행자 사업계획의 승인, 건설기술관리법령에 의한 건설기술심의위원회 심의, 특별자문위원회 심의, 설계자문위원회 심의 등에 소요되는 기간은 관계법령이 정하는 기준에 따라 효율적으로 관리한다.

다) 선수촌APT 사용협약에 관한 사항 지원협조

라) 시행자 사업계획 승인자료 작성

마) 각종 인․허가 승인 도서작성

바) 경제성검토(VE) 관련 용역수행자의 업무관련 자료제출, 회의참석, 설계반영 등 업무협조

사) FISU 협의, 설계 자문 및 기술심의, 계약심의, 일상감사, 공공디자인(필요시) 등에 관한 심의자료 작성 및 지적사항 설계반영 조치 등에 관한 업무 협조

아) 교통자료수집, 교통현황조사 및 특송기간 교통처리대책 수립

자) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 등 작성(공정표 포함)

차) 부대시설 구역(공동, 국제, 거주, 운영, 미디어)별 통제방안과 부족한 전원공급 처리 방안 제시

카) 대회 완료 후 원상복구에 필요한 하자부분 처리방안제시(손․망실 단가조사, 내역작성(설계금액, 수량 산출) 등에 필요한 자료 제출) 및 철거방안 제시

타) 선수촌 APT 사용과 관련된 협약(실내․외 마감재 사용 및 원상복구 등) 등 발주청에서 추진하는 협약체결(재건축조합, 현대건설) 지원

4) 기타사항 (용역수행기간 합동설계사무소 운영관련)

가) 용역수행기간 중 과업추진의 효율성 및 편의성 제고를 위해 광주광역시 관내에 합동설계사무소를 설치․운영하되, 감독관과 수시 협의가 가능한 위치에 두어야 한다.

나) 공동도급인 경우 공동도급사 모두가 참여하되, 적정인력 배치는 발주청과 협의하여 공정 수행과 발주청 요구사항 등이 원활히 수용 될 수 있도록 인원을 배치해야 한다.

다) 합동설계사무소 운영에 필요한 집기류는 용역업무 수행에 차질이 없도록 컴퓨터, 프린터기, 복사기, 설계도면 출력이 가능한 기기 등을 준비하여야 한다.

라) 합동설계사무소 출입자는 기밀유지와 용역수행에 방해가 되는 요인을 고려, 발주청 용역감독부서(감독관) 및 용역수행사 외에는 절대출입을 금하며, 출입일지 또는 출입카드를 작성 관리토록 한다.

마) 합동설계사무소 계약 당사자간(발주청, 용역사)의 회의 외에 업무집중을 방해하는 타 분야 등 별도의 회의는 절대금지토록 한다.

바) 합동설계사무소 배치인력과 출입 인력은 사전 발주청 감독관에게 보고하고, 발주청 출입자 명단은 용역사에 통보되어야 하며. 전화번호 등 연락체계는 감독부서와 용역사 외에 누구에게도 제공되지 않도록 하여야 한다.

사) 합동설계사무소 배치인원과 용역사에게 지시 또는 통보 건에 대한 협의는 감독부서(감독관)을 통해서만 하는 것을 원칙으로 한다.

아) 합동설계사무소 운영에 필요한 제반비용은 용역사에서 부담한다.

자) 합동설계사무소에서 추진사항에 대한 공정보고(주간, 월간)는 별도 공정관리 서식에 따른다.

차) 용어정의

(1) “용역수행기간”이라 함은 설계용역 계약체결일로부터 용역준공 성과품 납품 일 까지를 말한다.

(2) “합동설계사무소”라 함은 토목․건축․기계설비․전기․통신 분야기술자가 용역업무 추진에 필요한 적절한 사무실 면적 확보, 용역업무 추진에 필요한 집기류 등을 갖추고 각 분야별 학식과 경험이 풍부한 자를 용역사별 1명 이상 배치한 사무소를 말한다.

(3) “집기류”라 함은 토목․건축․기계설비․전기․통신 등의 기술자가 용역 업무를 추진하는데 있어서 필요한 일반컴퓨터, 설계도면 작성용 컴퓨터(CAD), 프린터기, 복사기, 책상 등을 말한다.

2. 설계용역 일반사항

가. 설계용역의 정의

본 설계용역의 최종 설계도서는 2015광주하계유니버시아드대회지원법, 건설기술관리법, 소방법, 국토의계획및이용에관한법률, 지적법, 건축법, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률, 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한법률, 폐기물관리법, FISU(International University Sports Federation)국제대학스포츠연맹)의 최소요구사항과 개별법에 의한 각종 규정에 위배됨이 없이 완료하여야 한다. (사업계획변경 협의, 시행자사업계획의 승인, 총사업비변경 협의 필요시 건축협의 등)

나. 납품

납품도서 작성방법, 부수는 본 과업지시서 제5장 설계도서 납품 도서목록에서 정하는 바에 따르거나, 발주청과 협의․조정 할 수 있다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계․감리 등 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부고시 제2013 -94호)에 따른다.

2) 용역납품 이후 공사 중 발생되는 설계변경사항(설계도서간 모순 및 현장여건에 의한 변경 등)에 대하여 기술적 자문과 협조․요청사항에 대하여 공사일정에 차질이 없도록 적극 협조하여야 한다.

3) 다음 경우에는 과업기간을 정지 또는 변경할 수 있다.

가) 상기 가) 동 기준 제14장 용역계약일반조건 제7절(3.~5.계약의 해제․해지)

나) 상기 가) 동 기준 제14장 용역계약일반조건 제7절(6. 용역의 일시정지)

다) 발주청의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

라) 각종 행정절차 이행 등으로 지연 될 경우 최종 행정절차 이행 시까지 용역을 일시정지 할 수 있다.

4) 본 과업수행시 과업 참여기술자의 퇴직 등으로 변경이 불가피하여 변경할 경우 사전에 발주청의 승인을 받아야 하며, 분야별 배치계획서상의 참여기술자와 건설기술관리법시행규칙 별표5(설계 등 용역업자 및 「건축사법」에 따른 설계자의 사업수행능력 평가기준)에 따른 등급, 실적, 경력 등이 공고기준 동등 이상인 자를 배치하여야 한다.

5) 설계자는 발주청의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행상 모든 하자에 대하여 용역수행자의 책임이 면제되는 것은 아니며 설계자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주청의 수정․보완요구가 있을 때에는 용역수행자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

6) 설계자는 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주청의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성 비치하여야 하며 발주청의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

7) 설계자는 본 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 진다.

8) 설계자는 정부 또는 발주청에 필요한 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행, 부주의, 과실로 인한 모든 책임은 설계자에게 있다.

라. 관계기술자 협력

1) 2015하계U대회 조직위원회 선수촌 운영팀 및 타부서 의견 반영

2) CTI(International Technical Committee of FISU, FISU국제경기위원회) 소속 기술위원, 대한체육회 소속 관련단체 및 우리 시 자문위원(시민추진위원회 포함)의 의견을 충분히 수렴하여 대회개최에 차질이 없도록 협력한다.

3) 통신부문 설계는 2015광주하계U대회 주간 통신사업자로 선정된 SK텔레콤과 협의하여 설계를 추진한다.

4) 선수촌병원의 구획 및 배치는 병원계획 전문가에게 자문을 구하여 배치계획을 수립하고 선수촌 부대시설 설치 위치 중 최적의 장소에 배치하여야 한다.

마. 설계변경 및 정산

1) 발주청은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지 시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정될 때에는 설계 용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 발주청의 방침에 따라야 한다. 이때 과업 범위의 증감이 발생할 경우에는 예산의 범위내에서 당해 계약금액을 조정 할 수 있다.

2) 사업위치(화정, 염주)별로 아래와 같이 예산범위를 정하고 적용되지 않은 설계용역 범위는 공고 당시 낙찰율을 적용하여 정산한다.

※ 예산의 범위

- 화정지구 22,905,564천원(공사비 20,823,240, 부가세 2,082,324)

- 염주지구  9,753,436천원(공사비  8,866,760, 부가세  886,676)

- 예비비 :  3,439,000천원

- 기  타 : 설계비 771,100천원, 책임감리비 953,700천원

※ 조직위 사정으로 선수촌부대시설 공사비 삭감시 용역비는 공사비에 준하여 정산한다.

바. 주요 업무의 사전승인 등

다음사항에 대하여 사전에 발주청과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 주요 설계내용 및 방침의 설정 또는 변경

3) 관계기관과의 협의사항

4) 설계기준의 설정 또는 변경

5) 기타 감독원의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

사. 기타 유의사항

1) 본 과업에 특정되지 않은 사항은 정부의 계약제도 및 관련법규, 최근 정부제정 각종 시방서 및 기준에 의거 설계하여야 하며, 단 분야별 내용이 상충될 경우에는 그 규정이 강화된 것을 우선한다.

2) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유발생시 발주청은 본 용역을 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며 과업지시서의 문구 해석상 계약 상대자간 차이가 있을 경우 발주청의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 아니한 사항에 대해서는 발주청이 정하는 바에 따른다.

3) 본 용역 준공이후 저작권 및 사용권 등 모든 법적 소유권은 발주청에 귀속된다.

4) 본 용역 기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 설계의 경제성 등 관련법 이행이나 행정절차가 필요한 경우 감독원의 지시 및 요구에 따라 이행하거나 자료를 제출하여야 하며 비용은 수급인이 부담한다.

5) 과업 종료후 제출하는 최종용역 보고서에는 모든 참여 기술자의 성명, 담당업무, 참여기간 등을 구체적으로 기재하고 날인한 후 제출하여야 한다.

6) 용역수행자는 용역과업이 준공된 이후에도 발주청의 사정에 의하여 설계보완 사항이 발생한 경우에는 설계보완 및 관련 부대업무를 수행하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 별도 지급하지 아니한다.

7) 시공 중 설계변경 및 공사비 증액이 되지 않도록 계획하여야한다.

8) 특수한 공법을 사용하고자 하는 경우에는 그 사유와 성능, 경제성, 시공성, 유통구조 기타 필요한 사항을 발주청에 제시하여야 한다. 다만, 건설기술관리법 제18조 규정에 의하여 지정․고시된 건설신기술의 사용이 가능한 경우에는 이를 적극 설계에 반영하도록 한다.

9) 설계도서에는 특정 제품의 사양을 명시할 수 없으며, 설계에 요구되는 성능과 재질을 명시하여야 한다.

3. 법령등의 적용 및 시방서 작성기준

가. 법령등의 적용기준

1) 설계자는 국토의계획 및 이용에 관한법률(이하 ‘국토법’이라 함), 건축법, 소방법, 항공법,「2011대구세계육상선수권대회, 2013충주세계조정선수권대회, 2014인천아시아경기대회, 2014인천장애인아시아경기대회 및 2015광주하계유니버시아드대회 지원법」(이하 ‘U대회지원법’)등 관련법령상 문제가 없는지 정확히 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하여야 한다.

2) 본 설계용역의 성과품은 본 과업과 관련 있는 최근의 관련법, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 작성 제출 되어야 한다.

3) 설계도서의 작성방법은 건설기술관리법 제23조의 2(설계도서의 작성 등), 동법시행규칙 제32조(설계도서의 작성), 제33조(설계도서의 검토), 국토해양부고시 : 설계도서 작성기준, KSF1501 : 건축제도통칙, KSF1505 : 건축구성재의 기본공차, KSF1509 : 건축부품의 치수정하기 등 관련규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주청과 협의 후 후속작업을 실시한다.

나. 시방서 작성 기준

1) 공사시방서는 국토해양부 등에서 시행되고 있는 각종 분야별 표준시방서를 기준으로 작성하되, 공사의 특수성·지역여건·공사방법 등을 고려하여 설계도면에 구체적으로 표시 할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술 할 것. 또한 관급자재의 발주를 위한 관급자재시방서를 작성한다. (중소기업자간 경쟁제품 및 공사용 자재 직접구매 대상품목 포함)

2) 공사시방서에는 건설업자 건설공사의 진행단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시하여야 하며, 그 작성기준을 별도로 마련하여 건설업자 감리원 등이 참고하게 하도록 하며, 건설기술관리법 제23조의 2 제3항의 규정에 따라 시공 상태를 검토․확인받아야 하는 대상공종을 공사시방서에 명시 할 수 있다.

3) 표준시방서는 국토해양부등 관련부처의 해당 분야(토목,건축,기계,전기,소방,통신 등) 공사표준 시방서를 기준으로 한다.

4) 특정 제품에 대한 시방작성(특허, 실용신안, 신기술 등)은 자제하며, 설계에 의한 마감, 자재 등이 특수하여 특정 제품의 사용 시에도 발주청의 의견을 들어 적용 할 수 있으며, 발주청의 의견, 승인 없이는 시방이나 도서작성으로 인해 공사비가 상승할 경우 용역수행자의 책임으로 한다.

제2장 과업 진행사항

1. 설계도서 작성

설계도서의 작성방법은 발주청이 정하는 소정양식에 의하고, 설계도서 작성중 이의가 있을 때에는 반드시 발주청과 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다. 본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 제시한 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 발주자가 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

2. 설계진행시 제출서류

설계자는 설계진행 시 다음 서류를 발주청에 제출하여야 한다.

가. 용역착수 시

설계자는 용역착수 시 다음의 제반서류(이하 “착수계”라 한다.) 2부(원본 1부, 사본 1부)를 구비하여 7일 이내 제출하여야 한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 설계용역수행 참여기술자 조직표 1부

5) 각 공종(토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방 기타)의 분야별 책임기술자 명단, 사무분장(구체적 명기), 필요에 따라 요구시 기술자격증사본, 기술경력증명서 등 각 1부

6) 설계용역 예정공정표(기본설계, 실시설계의 납품예정일자 명시) 1부

7) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(착수계 제출시)

8) 보안각서 각 1부

9) 기타 발주청이 필요하다고 요구하는 사항 등

나. 기본설계 제출시

1) 기본설계 작성방법에 따라 기본설계도서에 대하여 설계지침에서 정한 사항

2) 설계검사원 1부

4) 사업계획 변경고시 관련 해당기관, 부서 협의 서류 일체

5) 기타 발주청이 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

다. 실시설계 제출시

1) 실시설계 작성 지침에서 정한 사항에 의하여 작성하고 완료일로부터 30일 이내에 제출하되, 사전에 발주청과 협의 후 제출한다.

2) 종결보고서 필요 부수

3) 설계검사원 1부

4) 시행자 사업계획의 승인 고시 관련 해당기관, 부서 협의 서류 일체

5) 기타 발주청이 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

3. 업무보고 및 회의

설계자는 설계용역 시 정기적으로 설계 진행사항을 발주청에 보고해야 한다.

가. 업무 보고

1) 주간 공정보고

발주청 담당감독원과 협의하여 매주 목요일까지 붙임의 양식에 따라 제출한다.

2) 월간 공정보고

발주청 담당감독원과 협의하여 매월 1일까지 업무수행 사항 및 예정사항을 작성하여 붙임의 양식에 따라 제출한다.

3) 수시 보고

설계용역 진행 중 문제점 발생시에는 이를 육하원칙에 따라 분석하여 제출하되, 문제점 발생시마다 제출하여야 한다.

나. 업무 회의

1) 일반사항

가) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

나) 본 설계지침서에 대한 별도대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주청의 승인을 받아 채택할 수 있다.

다) 발주청은 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출․요구하여 수정․보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

라) 설계자는 자문회의 등 각종 회의 시 적극적으로 임하여 용역사 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무 착수회의는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 15일 이내에 장소와 일자를 발주청과 사전 협의하여 개최한다.

나) 업무 착수회의시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 설계 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 수시회의

설계용역자는 설계진행중 문제점이 발생하거나 실시설계 보고시 필요한 자료를 작성․배부하여야 하며, 보고회의 일정은 상호간 협의하여 개최한다.

제3장 과업지침

1. 일반사항

가. 설계도서 작성은 국토해양부고시 「기본설계 등에 관한 세부시행기준」 및 「설계도서 작성기준」에 따라 작성하여야 하며, 발주청 담당감독원과 협의하여 부분적으로 항목을 조정 할 수 있다.

나. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계용역자 임의로 판단해서는 안 되며, 담당감독원과 사전협의에 따라 이행한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 소방, 통신, 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

라. 설계자는 철저한 사전조사를 통하여 건물상태, 아파트상가 등 부대복리시설의 활용가능 여부 또는 대체시설 등을 확인 검토하여 기본설계에 반영하여야 한다.

마. 고효율에너지 자재가 없는 경우에는 KS제품을 사용하는 것을 원칙으로 하되, 공급이 안정적이고 사후관리가 용이한 것을 선택 사용하도록 한다.

바. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조에 의거 중소기업청장이 지정․고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매토록 설계 반영

1) 설계자는 상기 규정에 따라 해당되는 자재 LIST를 작성, 제출하여야 한다.

2) 결정된 관급자재는 특별한 사유가 없을 경우 설계자는 해당 자재를 설계에 반영하여야 한다.

2. 설계 일반지침

가. 설계VE 관련 업무수행 지침

설계 VE(경제성)검토 기간 중에 설계자의 주요 업무는 다음과 같다.

1) 설계자는 설계VE 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가하여 VE책임자와 검토조직으로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 확보하여 제공하여야 한다.

2) 설계VE 분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다고 발주청에서 판단하여 요구할 경우 설계자는 별도 일정을 정하여 발표할 수 있도록 하여야 하며, 특히 기술적 부분이 주요 내용이 될 경우에는 설계팀의 각 전문가들도 함께 참석해서 설명할 수 있어야 한다.

3) 설계자는 VE 실행단계에서 VE제안서를 VE책임자로부터 받아 검토 후 이에 대한 의견을 개진해야 하며, VE 실행을 위한 설계부서의 최종 적용여부에 대해서는 발주청 담당자와 협의하여 채택․ 실행하여야 한다.

4) 설계자는 채택(승인)된 VE 제안의 조치계획서를 작성하고 이를 발주청에 제출한다.

5) 설계자가 채택(승인)된 VE제안을 거부할 경우 이에 대한 명확하고 타당한 이유를 서면제출과 함께 각종 기술적 증빙자료도 제출하여야 하며,  채택(승인)된 VE제안에 대해서는 즉시 수정설계를 착수하여야 한다.

6) 그 외의 기타 사항은 국토해양부의 「설계VE 업무 매뉴얼」에 따라 효과적인 설계VE를 지원하기 위해 필요한 조치를 성실히 수행해야 한다.

나. 현지조사

설계자는 당해 과업범위 시설 등에 대한 설계도서, 토목, 건축, 기계설비, 전기 소방 등 관련 자료를 수집, 분석하여 부대시설 공사 범위를 확정한다.

1) 관련계획 자료조사

가) 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 설계의 자료로 활용한다.

나) 도시계획 현황과 토지이용 계획 등 관련 사업계획을 조사․검토하여 일관성 있는 계획이 수립될 수 있는 자료를 제공한다.

다) 설계자는 기존 도시계획시설 변경이 수반될 경우 도시계획 시설변경의 입안 및 결정고시를 위하여 필요한 자료를 발주청의 지시에 따라 작성하여야 한다.

2) 본 과업 수행시 주변 사업계획 등을 면밀히 검토하여 상호 연계되는 계획이 되도록 하되 협의사항을 도면에 표시하는 등 기록․유지를 하여야 하며, 협의과정 등에 이견이 있을 경우에는 발주기관과 협의하고 발주기관의 지시에 따른다.

3) 가능한 주변 관련 사업에 지장을 주지 않도록 계획하여야 하며, 부득이한 경우 대안을 검토․제시하여야 한다.

4) 의견청취

가) 시설물 관리주체 등 이해당사자 및 관계 행정기관의 의견을 미리 청취하여야 한다.

나) 사업설명회 개최 시 홍보자료, 도면, 팜플렛 등을 발주청의 요구에 따라 작성, 제출하여야 한다.

5) 교통소통 지원대책 수립

가) 선수촌 및 미디어촌으로 접근 및 이동과정에서 교통혼잡, 주차 등으로 인한 불편이 없도록 교통소통을 위한 운영대책을 수립하여야 한다.

나) 승용차 관람객, 주말과 평일의 관람객, 피크타임시 교통수단별 이용관람객에 대한 수요관리 및 분산대책을 제시하여야 한다.

(1) 임시 대형주차장 운영계획 수립

(2) 버스전용차로 도입 및 운영방안 수립

(3) 최적 도로운영방안 수립

(4) 교통정보 및 주차정보 제공방안 수립

(5) 교통수요관리방안 수립

(6) 교통통제 방안 수립

(7) 기타 교통대책 수립

다) 주경기장과의 이격 거리 등을 조사하여 별도 도면에 명기하여야 한다.

6) 토취장, 골재원, 사토장, 재료원 조사

공사시 시공성 및 경제성을 최대한 높일 수 있는 토취장, 골재원 및 사토장재료원을 조사하여 본 과업에 사용 여부를 발주기관과 협의하여 결정한다.

7) 본 장에 명시되지 않은 사항은 발주청과 협의 후 시행하여야 한다.

다. 주요 설계기준

1) FISU 제규정 및 최소기준을 바탕으로 조직위 및 관련기관의 확인을 받아 경제성을 비교검토하고 설계에 반영한다.

2) 화장실, 샤워실 배치등은 동선과 향후 유지관리의 경제성을 바탕으로 기존시설 공간활용 개조 또는 임시시설 활용 등을 설계에 반영한다.

3) 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

4) 보안성이 중요시되는 실 등을 제외하고는 벽면은 가변성인 경량칸막이로 설계하여야 한다.

5) 각 기능실은 기존시설(공간)을 최대한 활용배치하고, 부족한 기능실은 건물내 여유공간 활용 및 건물외부 여유 공간에 적합한 임시구조로 배치하여야 한다.

6) 주요자재 사용계획

가) 건물의 용도와 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내자재 중 K․S제품 사용이 원칙이며, K․S제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주청과 협의하여 선정한다.

다) 부득이 수입자재 등을 사용하여야 할 경우에는 사전에 발주청와 협의하여 결정한다.

라) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 사전에 현지생산 공급처를 면밀히 확인 후 설계하여야 한다.

마) 임대시설물에 대해서는 임대공급사와 별도 협약서(계약서)를 제출받아 설계에 반영하고 사용 후 처리방안 또한 반영하여 한다.

7) 폐기물 처리분야

가) 공사 후 발생될 폐기물은 관련 규정에 따라 적정하게 처리될 수 있도록 별도의 발주도서를 작성하여 제출하여야 한다.

나) 폐기물 처리계획은 발주청과 반드시 협의하여 매각 또는 고철처리 방안을 강구하고 설계에 반영한다.

3. 설계 세부지침

가. 구역별 활용가능 시설조사 및 부대시설별 적정면적 검토

1) APT 부대시설 및 부지에 대한 조사를 실시하여 기존시설의 활용도 및 여유부지에 대한 활용가능 면적을 검토하여 반영한다.

2) 단지내 학교 및 인근 나대지에 대한 조사를 실시하여 활용도 및 활용가능 면적을 검토하여야 한다.

3) 부대시설별 필요한 기반시설(상·하수도·전기·가스 등) 관련 사항을 조사하여 시설계획시 반영하여야 한다.

4) 부대시설에 대한 시설별 적정면적을 검토하여 협의·조정하여야 한다.

(부서별 기능실 요구사항 변경시에도 기능에 지장이 없는 최소한의 규모)

나. 선수촌·미디어촌 등 구획 및 출입동선 계획

1) 각종 규정 및 기준을 참고하여 공동, 국제, 거주구역 등으로 구획하는 계획과 미디어촌을 포함한 종합계획(마스터플랜)을 작성한다.

2) 선수촌 구획은 선수, 임원에 대한 편의가 제공될 수 있도록 하되 선수 보호를 위한 안전대책을 고려하여 구획하여야 한다.

3) 선수촌 구획은 APT, 상가, 학교 등 기존시설을 최대한 이용하는 계획을 수립하여야 한다.

4) 선수촌 주변 도로여건을 감안한 최선의 선수촌 출입동선을 검토하여 선수, 임원, 운영요원, 방문객 등 출입인원․물자차량 등에 대한 동선계획을 수립하여야 한다.

5) 선수촌 내에서 선수, 임원, 운영요원들의 구역간 이동을 위한 선수촌내 이동계획을 반영하여야 한다.

다. 부대시설별 세부 배치계획 수립

1) 세부 배치대상 부대시설은 조직위가 제시한 시설목록을 기준으로 하되 변경이 필요한 시설은 변경된 면적을 기준으로 하여 세부 배치계획을 수립하여야 한다.

2) 모든 부대시설은 APT 및 부대시설, 학교시설, 상가시설 등 기존시설을 가능한 최대로 이용하고 기존시설의 훼손없이 설치 및 철거가 용이한 자재로 기능실을 배치 계획하여야 한다.

3) 기존시설 활용을 초과하는 기능실의 공간 확보는 공사비 예산 범위내에서 최대한 경제적인 설계가 되도록 임시시설물 설치를 계획하여야 한다.

라. 임시부대시설 설치계획 수립

1) 선수촌 내부의 기존시설을 최대한 활용하여 임시시설물을 최소화하되 선수촌   운영과 사용자 편의를 위한 임시시설을 적절히 설치한다.

2) 임시시설은 시설의 설치목적에 부합하는 것을 사용하되 운영뿐 아니라 설치   및 철거를 고려하여 채택하여야 한다.

3) 특히, 선수식당 등은 경제적인 설치방안을 검토하고 다음 사항을 설계에 반영한다.

가) 기존시설 활용을 포함한 모든 시설물은 설치 사용후 원상복구(철거 등)가  용이한 구조 및 자재이여야 하며, 렌탈(임차) 자재 사용으로 소요 공사비가  최소화 될 수 있도록 하여야 한다.

※ 공사비의 산정 기준

선수촌·미디어촌 등 모든 기능실 및 부대시설은 경기대회 종료 후 철거   (원상복구)해야하는 임시시설물로서, 일부 지반조성·기초지정·임시기반시설 설치 등 매몰성 공사비용을 제외한 모든 시설물은 임차시설로 설치하고 이에 대한 임차료를 공사비로 적용한다.

나) 옥외 설치 시설물은 규모에 따라 구조 및 안전성이 확보되어야 하며,     유지·관리가 용이하여야 한다.

․ 건축구조기준은 국토해양부 고시 제2009-1245호 및 공고 제2011-1254호

(소규모 건축물 구조지침)를 참고하여 설치 기준을 정한다.

다) 사용자재는 가능한 불연성자재로 환경 친화적이며 경제성과 내구성이 우수    하고 규격화된 제품 중에서 자유롭게 선택할 수 있다.

4) 유사시 시설물 긴급복구팀 구성․운영 방안을 제시하여야 한다.

5) 임시시설 설치 및 기존시설 이용에 필요한 상․하수도, 기계설비, 전기, 통신   등 기반시설 활용방안을 작성하여야 한다. 단, 활용방안에는 설계 및 소요   공사비가 포함되어야 한다.

6) 구역별 세부시설 배치 및 설치에 따른 각 시설별 설계 및 공사비를 산출한   설계도서를 작성하여야 한다.(철거 및 폐기물처리를 포함한다)

7) 선수·임원 보호를 위한 안전대책(구역을 구분하는 펜스 설치계획 등)을 강구   하여 이에 따른 설계 및 공사비를 산출하고 그 설계도서를 작성하여야 한다.

4. 설계도서의 분리작성

토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

5. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 용역계약일반조건 제2절 3항(사용언어)에 의하며, 한국어를 원칙으로 하되 국제대회임을 감안 발주청과 협의하여 영어 사용을 병행한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 설계도면에서 1~2회 나타나는 것은 원어사용을 원칙으로 하며, 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

6. 도면 작성

가. 제도용지(트레이싱 페이퍼)는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

라. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신도면은 발주청의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

마. 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명 날인하여야 하며 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시하여야 하고 당사자로 하여금 이를 확인한 후 날인하도록 하여야 한다.

7. 설계기준 및 참고자료

관련 중앙부처에서 제정한 각종 시방서 및 시설기준, 표준도 및 표준품셈을 적용하여야 하며, 본 용역 관련 수집된 계획 및 용역보고서를 수집 활용한다.

가. 2015광주하계유니버시아드대회 간이예비타당성조사보고서(KDI)

나. 2015광주하계유니버시아드대회 관련시설의 설치ㆍ이용 등에 관한 계획

다. 2015광주하계유니버시아드 경기장․선수촌 건설기본계획 등 수립용역

라. FISU 제규정 및 최소기준

마. CTI 및 CMI Inspection 설계자문

8. 기술심의 및 설계자문

가. 설계자는 건설기술관리법 시행령 제19조에 의한 기술심의를 받아야 한다.

나. 설계자문은 발주청의 요구에 따라 시행하여야 하며, 전체 용역과업을 대상으로 하여야 한다.

다. 발주청은 설계자문 시기, 자문내용 등 설계자문 계획을 자문시행 10일 전까지 수급인에게 통보하여야 하며, 수급인은 효율적인 설계자문이 될 수 있도록 발주청에게 자문시행 5일 전까지 설계자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

라. 설계자는 발주청으로부터 통보 받은 건설기술심의위원회 심의 결과 및 설계자문 결과를 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 하고 보고서에 수록하여야 한다.

9. 총사업비 관리

가. 기본설계, 실시설계를 시행함에 있어서 예비타당성조사 및 타당성조사에서 정한 총사업비를 감안하여 설계내용이 적절히 관리 될 수 있도록 노력하여야 한다.

나. 기본설계, 실시설계 과정에서 객관적인 사유 없이 당초의 사업규모를 변경 할 수 없음.

다. 기본설계, 실시설계 과정에서 사업내용과 규모를 예비타당성조사 및 타당성조사와 다르게 변경할 필요가 있을 경우 문화체육관광부 장관 및 기획재정부장관과 사업규모 및 총사업비 등을 사전 협의 할 수 있도록 객관적인 변경사유 등 관련 자료를 구비하여 제출하여야 한다.

라. 기본설계, 실시설계용역이 완료된 경우 문화체육관광부 장관 및 기획재정부장관과 사업규모, 총사업비 및 사업기간을 협의 할 수 있도록 설계용역결과 보고서 및 요약보고서 등 관련 자료를 구비하여 용역준공 전 발주청에 제출하여야 한다.

10. 사업계획 변경 및 시행자 사업계획의 승인 등

가. 시행자 사업계획의 승인 및 고시 등 (실시설계단계에 추진)

『2015광주하계유니버시아드대회 지원법 제27조 및 같은법 시행령 제15조』

1) 인․허가 신청 및 협의 시 구비서류 준비

가) 해당사업 인허가 신청서

나) 위치도 및 계획평면도

다) 공사설계도서

라) 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지․지번․지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자․권리자의 성명․주소를 기재한 서류

마) 관계부서 협의 시 각종 법률에 의한 협의서류 1식

2) 시행자 사업계획의 승인 및 고시

가) 사업시행지역의 위치도

나) 수용하거나 사용할 토지ㆍ물건 및 권리(이하 이 조에서 "토지등"이라 한다)의 소재지ㆍ지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명ㆍ주소 등

다) 토지등의 매수ㆍ보상계획 및 주민의 이주대책

라) 계획평면도 및 개략설계도서

마) 사업시행기간

바) 자금조달계획

사) 공공시설물의 이전 및 철거계획과 대체시설물의 설치계획

아) 법 제28조제1항 각 호에 따른 허가 등 의제사항이 있는 경우 그 내용

자) 기타 인․허가 시 필요한 관련서류 등

제4장 설계도서 납품목록

설계도서 납품은 감독의 승인을 득한 후 20일 이내에 도서를 납품하여야 하며, 규격 및 수량은 다음 각 호와 같다.

또한, 기본설계부터 실시설계까지 모든 용역수행과정을 수록한 CD와 설계용역 종합보고서를 별권으로 20권을 발주청에 제출하여야 한다.

1. 기본설계 납품도서

구분	설계 도서명	규격	수량	단위	공 종						비 고
					토목	건축	조경	기계	전기	통신
1	사업계획(변경) 수립보고서(협의)	A4	50	부
2	사업계획(변경) 수립보고서(심의)	A4	50	부
3	사전조사검토보고서	A4	10	부
4	기본설계보고서	A4	10	부
5	측량보고서	A4	10	부							필요시
6	토지대장,등기부등본	A4	3	부							원본1, 사본2
7	용지도 및 조서	A4	10	부							필요시
8	설계도면	A3	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종
9	내역서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략공사비
10	관급내역서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략공사비
11	각종 인허가도서 및 기타 발주청 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯

주)  1. 발주청과 수급인의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있다.

2. ○표는 공종에 해당됨을 의미한다.

3. 기본설계보고서에 포함사항(사전조사내용, 분야별 설계설명서, 공사개요, 교통동선분석, 향후 실시설계 방향 등)

4. 전체적인 일정을 고려 기본설계와 실시설계를 일괄 합본하여 납품 할 수 있다.

6. 각종 인허가 도서는 관계기관(부서)협의 시 협의 부서 요구대로 도면 및 보고서 작성 제출 (공공디자인심의, 사업계획변경, 시행자 사업계획승인 등 전 관계부서 협의서류, 문체부 협의 등)

2. 실시설계 납품도서

[공종별 실시설계서 제출 목록]

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종						비 고
					토목	건축	조경	기계	전기	통신
1	시행자 사업계획의 승인 고시자료	A4	50	부							부록별책가능
2	설계보고서 (종합보고서)	A4	20	부							부록별책가능
3	백 도	A3	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	구조 및 수리계산서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	내역서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	관급내역서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	해당시
7	수량산출서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	단가산출서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
9	일위대가	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	공사시방서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	특기시방서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	관급시방서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	CD-ROM		3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
14	기타 발주청 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯

주) 1. 설계보고서(종합보고서(A4) 20부

※ 보고서에는 설계 설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체를 기재하여 A4규격의 책자로 양면인쇄하고 무선무사철로 좌철하여야 한다.

2. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다.

3. 전체적인 일정을 고려 기본설계와 실시설계를 일괄 합본하여 납품 할 수 있다.

4. 각종 인허가 도서는 관계기관(부서)협의시 협의 부서 요구대로 도면 및 보고서 작성 제출 (공공디자인심의, 사업계획변경, 시행자 사업계획승인등 전 관계부서 협의서류, 문체부 협의등)

5. 실시설계 완료단계에 사업계획변경이 필요한 경우 사업계획변경과 시행자사업계획변경을 함께 발주청과 협의하여 제출

제5장 관련서식

1. 보안 각서

보  안  각  서

1. 용 역 명 : 2015광주하계U대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역

2. 계약일자 :

3. 착수일자 :

4. 완수예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 중요 시설임을 인식하고 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항은 용역계약 일반조건 제9절 부정당업자의 제재 및 당사자의 의무 2. 기술지식의 이용 및 비밀엄수의무에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건설기술관리법 제21조(발주청이 시행하는 용역사업) 제4항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2013년   월   일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술 분 야 :

성        명 :                   (인)

2015광주하계유니버시아드대회 조직위원장 귀하

2. 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자  선 임 계

1. 용 역 명 : 2015광주하계U대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2013.   .   .

4. 착수일자 : 2013 .   .   .

5. 완수예정일 : 2013 .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2013 .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

2015광주하계유니버시아드대회 조직위원장 귀하

3. 설계 검사원

설계 검사원 (실시)

1. 용 역 명 : 2015광주하계U대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2013 .   .   .

4. 착수일자 : 2013 .   .   .

5. 완수예정일 : 2013 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2013 .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

2015광주하계유니버시아드대회 조직위원장 귀하

4. 주간(격주간) 공정보고

주간(격주간)공정보고

� 용 역 명 : 2015광주하계U대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역

◦ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 2013 년  월  일 ~ 201 년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

� 용역진행사항

구 분	전주 진행사항 (201 . . .~ 201 . .)	금주 예정사항 (201 . . .~201. . .)	비고(진행률)
업무 내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정 / 예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

2015광주하계유니버시아드대회 조직위원장 귀하

5. 월간 공정보고

월간 공정보고

� 용 역 명 : 2015광주하계U대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역

� 용역개요 :

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 201 년  월  일 ～ 201 년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

� 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (201 . . . ～ 201 . . .)	비 고
첫째주		실시 / 예정공정 (%)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

2015광주하계유니버시아드대회 조직위원장 귀하

제6장 과업 예정공정표

구 분	착수일로부터 9개월																		비고
	1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월
1. 자료수집, 현장조사 및 관계기관협의
2. 기본설계
3. 실시설계
4. 시행자 사업계획의 승인(필요시 사업계획변경)
5. 각종 보고회 및 심의

※ 보고회는 착수. 중간. 최종보고회 3회를 기본으로 하며 필요시 설계자문 및 기타 심의는 보고과정에서 행하거나 별도 시행할 수 있다.