과  업  지  시  서

탐라문화광장 조성사업 전면책임감리용역

2013.  11.

【도시디자인본부 도시디자인단】

목          차

Ⅰ. 용역과업설명서  ……………………………………………………… 1

Ⅱ. 일반과업지시서  ……………………………………………………… 2

Ⅲ. 특별과업지시서  ……………………………………………………… 9

Ⅳ. 보안 및 기타유의사항 ……………………………………………… 20

Ⅰ. 용역과업설명서

1. 과업의 목적

○ 본 과업은 탐라문화광장을 원도심 테마관광의 중심지역으로 육성하여 세계인이 찾는 관광문화명소로 조성하기 위한 「탐라문화광장 조성사업」을 시행함에 있어,

○ 설계도서, 시방서 및 관계 규정에 따라 우수한 품질관리와 효율적인 공정관리, 정교한 시공, 철저한 안전관리 및 환경관리 등을 위하여 풍부한 경험과 전문기술 인력을 보유하고 있는 감리전문회사로 하여금 예산의 적정집행과 원활한 공사시행이 되도록 전면책임감리 업무를 수행하도록 하기 위함.

2. 과업의 개요

2.1 과업명: 탐라문화광장 조성사업 전면책임감리용역

2.2 위치: 제주시 일도1동, 건입동 일원(산지천 중심)

2.3 과업내용: 공사 전반(폐기물처리 포함)에 대한 전념책임감리

2.4 공사개요

○ 산지로 보행환경 개선공사 L=836m, B=6~26m

○ 산지천 생태하천 복원공사 A=15,487㎡(L=475m)

○ 광장조성 3개소(A=9,215㎡), 공원조성 1개소(A=7,226㎡)

○ 건축 및 전기(광장, 공원, 도로, 하천 등)공사 1식

3. 감리용역기간 및 설계변경조건

3.1 착수일로부터 28개월

공사기한은 시설공사 준공 시까지를 원칙으로 하고 시설공사의 공사기간 변동 시 시공감리용역 기간도 조정 변경하여 시행한다.

3.2 설계변경조건

본 용역의 대가는 “건설공사 감리대가 기준”에 따라 정액적산 방식을 적용하여 산출하였으며 다음의 경우 그 대가를 조정한다.

가. 계약체결(직전 조정기준일) 후 90일 이상 경과하고, 입찰일(직전 조정기준일)로부터 물가변동으로 인한 등락율이 100분의 3이상 증감이 있을 경우

나. 용역기간의 조정, 감리원 투입계획의 조정 등 정당한 설계변경 사유가 발생하였을 때

Ⅱ. 일반과업지지서

1. 감리업무 수행

1.1 책임감리를 수행함에 있어 본 공사의 설계도서, 감리업무수행지침서, 과업지시서와 아래의 각종 시방서 및 규정에 의하여 수행할 수 있도록 사무실에 비치하여 이를 충분히 숙지하고 철저히 이행하여야 한다.

가. 도로의 구조, 시설기준에 관한 규칙

나. 건설교통부 제정 각종 공사 표준시방서 및 설계기준

․도로공사 표준시방

․도로포장 설계 및 시공지침

․콘크리트 표준시방서

․조경공사 표준시방서

․구조물 기초설계기준

․기타 공사와 관련한 시방서 기준

다. 건설공사 관련 법령 및 규정

․건설기술관리법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 도로법, 하수도법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 정보통신공사업법, 소방시설 공사업법 등

라. 한국산업규격

마. 건설공사 품질 및 규격관리실무 편람

바. 환경정책기본법

사. 산업안전보건법

아. 기타 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

2. 감리원의 기본업무

2.1 감리원은 건설기술관리법 시행령 제52조 제1항의 업무와 규칙 제34조의 규정에 의한  감리업무를 성실히 수행하여야 한다.

2.2 발주처와 감리회사간에 체결된 감리용역 계약의 내용에 따라 감리원은 본 공사가 설계도서 및 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리, 공정관리, 안전 및 환경관리 등에 대한 기술 지도를 하며, 건설기술관리법령에 따라 발주처의 감독권한을 대행하게 된다.

3. 감리원의 근무원칙

3.1 감리원의 지위

감리업무를 수행함에 있어 감리원은 발주처과의 계약에 의하여 발주처의 감독업무를 수행하며, 발주처은 관계법령에서 별도로 정하는 사항 및 계약내용에 정하는 사항 외에는 정당한 사유 없이 감리원의 업무에 개입 또는 간섭하거나 감리원의 권한을 침해할 수 없다.

3.2 감리원의 업무자세

감리업무에 종사하는 자는 다음 각호의 업무를 성실히 수행하고, 건설공사의 품질향상에 노력하며, 감리원으로서의 품위를 유지하여야 한다.

가. 감리원은 관계법령과 이에 따른 명령 및 공공복리에 어긋나는 어떠한 행위도 하지 않으며 신의와 성실로서 업무를 수행하여야 하며, 품위를 손상하는 행위를 하여서는 안 된다.

나. 감리원은 담당업무와 관련하여 제3자로부터 일체의 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 안 된다.

다. 감리원은 건설공사의 품질향상을 위하여 기술개발과 보급에 전력하여야 한다.

라. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어서 당해 공사의 공사계약문서, 감리 과업지시서, 기타 관계규정 등의 내용을 숙지하고 당해 공사의 특수성을 파악한 후 감리를 수행하여야 한다.

마. 감리원은 시공자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 임의로 설계를 변경시키거나, 기일연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 안 된다.

바. 감리원은 공사현장의 문제점이 발생되거나 시공에 관련한 중요한 변경 및 예산과 관련되는 사항에 대하여는 수시로 발주처에 보고하고 지시를 받아 업무를 수행한다. 다만, 인명손실이나 시설물의 안전에 위험이 예상되는 사태가 발생할 시에는 먼저 적절한 조치를 취한 후 즉시 발주처에 보고하여야 한다.

사. 감리전문회사 대표자 및 감리원은 당해 공사 시행중은 물론 공사가 종료된 후라도 감사기관의 수감요구 및 문제발생으로 발주처의 출석요구가 있는 경우에는 이에 응하여야 하며, 감리업무 수행과 관련하여 발생된 사고 또는 피해발생으로 피해자가 소송제기 시 국가지정 소송업무에 대하여 적극 협력하여야 한다.

3.3 상주감리원의 현장근무 방법

가. 상주감리원은 공사현장(공사와 관련한 외부 현장점검, 확인 등 포함)에 상주하여야 하며, 업무 또는 부득이한 사유로 1일 이상 현장을 이탈하는 경우에는 반드시 감리업무일지 등에 기록하고 서면으로 발주처의 승인(긴급시 유선 승인)을 받아야 한다.

나. 감리전문회사는 감리업무에 종사하는 감리원이 감리업무 수행 기간 중 법에 의한 교육이나 「민방위기본법」 또는 「향토예비군설치법」에 의한 교육을 받는 경우나 근로기준법에 따른 유급 휴가로 현장을 이탈하게 되는 경우에는 감리업무에 지장이 없도록 직무대행자 지정(동일현장의 상주감리원 또는 기술지원감리원) 및 업무 인계‧인수 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 상주감리원은 발주처의 요청이 있는 경우에는 초과근무를 하여야 하며, 시공자가 발주처의 승인을 득하여 초과근무를 하는 경우에는 초과근무를 하여야 한다. 이 경우 대가지급은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한 회계예규(용역계약일반조건)에서 정하는 바에 따른다.

3.4 기술지원감리원의 업무범위

가. 감리전문회사의 본사 등에 근무하면서 상주감리원의 업무를 지원하는 기술지원감리원의 업무범위는 다음과 같다.

1) 건설기술관리법 시행규칙 제59조 제1항에서 정한 업무

2) 설계변경 및 계약금액 조정의 심사(계약금액 감액의 경우를 포함)

3) 상주감리원의 능력범위를 벗어난 현장시공 상의 문제점에 대한 기술검토와 민원사항에 대한 현지조사 및 해결방안 제시

4) 정기적(월1회 이상 시행(해당 공종)하되, 상반기와 하반기 각 1회 이상 발주처가 지정한 시기에 기술지원감리원 합동시행)으로 현장시공 상태를 종합적으로 점검, 확인, 평가하고 기술지도

5) 공사와 관련하여 발주처의 장이 요구한 기술적 사항 등에 대한 검토 및 대책제시

6) 공사의 기성 및 준공 검사

7) 기타 감리업무 추진에 필요한 지원 업무

나. 기술지원감리원은 가호 1) 내지 7)의 업무를 정확하고 신속하게 지원하여야 한다.

4. 공사시행 단계별 업무분담

발주기관, 감리원, 시공자간의 공사시행 단계별 업무분담은 다음과 같다

단 계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 청		감리원	시공자
					공사관리관
공사착공	·감리계약 체결	·P.Q기준 ·감리업무수행계획서, 감리원 배치계획서			작성 검토
	·용지측량, 기공승락, 지장물 이설 확인 용지보상등의 지원업무를 수행 ·감리업무 착수 ·업무연락처 등의 보고					주관 시행 시행
	·설계도서 등의 검토	·발주처에 보고 ·감리원에게 보고				검토, 보고	검토, 보고
	·감리사무실 설치 및 설계도서 등의 관리	·사무실의 설치 ·설계도서 등의 관리	시행			시행	시행
	·착공신고서 ·공사표지판 등의 설치					검토, 보고 승인	작성 시행
	·측량기준점 및 각종 규준 시설	·측량기준점의 보호				이동시 승인	시행
		·규준시설 설치				확인	시행
	·확인측량	·확인측량 실시				입회, 확인	시행
		·확인측량 결과의 처리	지시			검토,보고	작성
	·유관자 합동회의		요구			주관	내용설명
	·하도급 관련사항					검토	요구
	·현장사무소, 공사용도로 작업장부지 등의 선정	·가시설물 설치계획표			협의	승인	작성
	·현지여건 조사		승인			합동조사	합동조사
	·인·허가 업무		주관			요구	요구
	·공사착수 회의		주관			주관	주관
	·품질관리계획(품질시험계획)		승인			검토	주관
	·안전관리계획		승인			검토	주관

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 청	감리원	시공자
				공사관리관
공사시공(1)	·일반행정업무	·감리원에 대한 지도관리 ·감리기록관리 ·발주처에 정기 및 수시 보고사항 ·현장 정기교육 ·발주처의 자문요구 및 감리원의 의견제시	승인 접수 요구	주관	확인 보고 지시 작성	작성 주관
공사시공(2)	·일반행정업무	·민원사항 ·발주처의 지시사항 전달 및 공사수행상 문제점 파악보고 ·기성검사 입회 ·현장대리인, 시공자 기술자 등의 교체 ·추가용지보상 업무 ·제3자 손해의 보상 ·시공자에 대한 지시 ·수명사항의 처리 ·공사 진행과정 사진 촬영 및 설명서 작성	요구 요구 주관 지시	조치 주관 입회 조사	검토, 보고 작성 검토,보고 협조 검토 주관 보고 보관	조치 시행 협조 주관 결과 보고 이행 주관
	·품질관리	·품질관리계획 ·품질시험계획 ·품질시험의 요령 및 조치 ·시험·검사성과 처리 ·외부기관에 품질시험의뢰	주관 이행확인 주관		이행확인 이행확인 입회확인 검토,확인 지시 입회확인	작성 작성 시행 보고 주관
	·시공관리	·시공계획서 ·시공상세도 ·명일 작업실적 및 명일 작업계획서 ·시공확인 ·검측업무 ·매몰부분 검사 기록 ·현장 실정보고	요구 요구 승인		검토,확인 검토,확인 검토,확인 확인,지시 확인,승인 작성 작성,확인 검토,보고	작성 작성 작성,협의 시행 요청 작성

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 청	감리원	시공자
				공사관리관
공사시공 (3)	·시공관리	·암반선 ·특수공법 ·기술검토 의견서 ·주요기자재 공급원의 검토 승인 신청서 ·주요기자재의 검수,관리 ·지급자재의 검수,관리 ·지장물 및 기존 구조물의 철거 ·발주처에 현장 상황보고 ·감리원의 공사중지명령 등	협의 승인 검토,지시		확인 검토 작성 승인 확인 확인,보고 검토,확인 보고 지시,요구	요구 요구 작성 주관 요구 작성 시행
	·설계변경 및 계약금액의 조정	·경미한 설계변경 ·발주처의 지시에 의한 설계변경 ·시공자의 제안에 의한 설계변경 ·변경계약전 설계변경에 따라 기성고 및 지급자재의 지급 ·계약금액의 조정	지시 통보 승인 승인	검토	검토,지시 보고 검토,보고 검토,보고 지시 확인 심사,보고	작성 검토,작성 보고 작성 요구 작성
	·공정관리	·공정관리계획서 (실시공정표 포함) ·공사진도관리 (월간·주간 상세공정표) ·부진공정 만회대책 ·수정 공정계획 ·준공기한 연기원 ·공정현황 보고	승인		승인,보고 검토,확인 지시 지시,검토 보고 검토,승인 보고 검토 검토,확인 보고	작성 작성 작성 요구, 작성 작성 보고

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발 주 청		감리원	시공자
				공사관리관
공사시공 (4)	·안전관리 ·환경관리	·안전관리 ·안전점검 ·안전교육 ·안전관리 결과 보고서 ·사고처리 ·환경관리 ·제보고 사항	주관		확인,지도 지도,감독 지시,감독 검토,지시 지시,보고 지도,감독 보고	시행 시행 시행 작성 조치 시행, 보고 작성
기성부분 및 준공검사	·검사지침	·검사자의 임명 ·검사 ·불합격 공사에 대한 재시공명령 ·기성부분검사원 및 기성내역서 검토 ·감리조서의 작성 ·기성부분 검사 ·시설물 시운전 ·예비 준공검사 ·준공검사원 ·준공도면 등의 검토 ·공사현장의 사후관리 ·준공표지의 설치	입회,확인 주관	입회 입회 입회	보고 검사,보고 지시, 재검사 검토 작성 검사,보고 검토,보고 검토, 보고, 입회 확인,보고 검토,확인 보고 확인,검사 지시,확인	조서 작성 시행 작성 입회 작성 작성, 보완 작성 작성 시행 시행
인계인수	·시설물 인계․인수 ·준공 후 현장문서 인계․인수 ·유지관리 및 하자 보수	·시설물 인계․인수 계획수립 ·시설물 인계․인수 ·준공도서 등의 인수 ·시설물의 유지관리 지침서 등 ·하자보수에 대한 의견제시	시행 협의,인수 조사지시		검토,통보 입회,검토 협의,작성 검토,보고 의견제시	작성 시행 자료제출

Ⅲ. 특별과업지지서

1. 감리용역기간

용역과업 착수일로부터 28개월로 하며, 공사기간 연장 시에는 감리 준공기한도 연기한다.

2. 설계변경조건

2.1 감리기간 변경 및 감리용역의 중단 등으로 감리기간 증․감이 있을 때

2.2 감리업무량에 따라 감리원의 증․감이나 등급의 변경(발주처 승인 시)이 있을 때

2.3 기타 발주처의 사정에 의한 예산의 증․감 등 정당한 사유가 발생되었을 때

3. 감리업무 착수

3.1 감리전문회사는 계약즉시 상주 및 기술지원감리원 투입 등 감리업무 수행계획서를 작성하여 발주처에 제출하고 감리원 투입계획을 협의한 후 계약상 착수일에 감리용역을 착수하여야 한다. 단, 감리대상 건설공사의 전부 또는 일부의 용지매수 지연 등으로 계약상 착수일에 감리용역을 착수할 수 없는 경우에는 발주처는 실 착수 시점 및 상주감리원 투입시기 등을 조정, 통보하여야 한다.

3.2 감리전문회사는 감리용역 착수 시 다음 각호의 서류를 첨부한 착수신고서를 제출하여 발주처의 승인을 받아야 한다.

가. 감리업무수행계획서

나. 감리비 산출내역서

다. 상주, 기술지원감리원 지정신고서와 감리원 경력확인서

라. 감리원 조직 구성내용과 감리원별 투입기간 및 담당업무

마. 기타 발주처가 지정한 사항

3.3 감리전문회사 선정을 입찰자격심사제도로 적용한 경우에 있어 “3.2”항 다호의 감리원은 입찰참가제안서에 명시된 자로 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 교체가 필요한 경우에는 기술자격, 학‧경력 등을 종합적으로 검토하여 감리업무 수행 능력이 저하되지 않는 범위 내에서 발주처의 사전 승인을 받아야 한다.

3.4 발주처는 “3.2”항 제다, 라 호의 내용을 검토하여 감리원 또는 감리조직 구성내용이 당해 공사현장의 공종 및 공사 성격에 적합하지 않다고 인정될 때에는 그 사유를 명시하여 서면으로 변경을 요구할 수 있으며, 변경 요구를 받은 감리전문회사는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

3.5 감리원은 공사시공과 관련된 각종 인‧허가 사항을 포함한 제반법규 등을 시공자로 하여금 준수토록 지도‧감독하여야 하며, 발주처가 득하여야 하는 인‧허가 사항은 발주처에 협조‧요청하여야 한다.

3.6 승인된 감리원은 업무의 연속성, 효율성 등을 고려하여 특별한 사유가 없는 한 감리용역 완료시까지 근무토록 하여야하며 교체가 필요한 경우에는 제반 법규에 따라 교체 인정 사유를 명시하여 발주처의 사전 승인을 받아야 한다.

3.7 감리원의 구성은 과업지시서에 기술된 과업내용에 의거 관련분야 기술 자격 또는 학력, 경력을 갖춘 자로 구성되어야 한다.

3.8 감리단의 조직은 공사담당과 품질담당으로 현장여건에 따라 구성토록 함으로써 감리업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 하여야 한다.

3.9 상주감리원 및 기술지원감리원은 분담내용에 따라 업무수행계획을 수립하여 과업을 수행토록 한다.

3.10 감리원은 현장에 부임하는 즉시 사무소, 숙소 또는 비상연락처의 전화번호 및 FAX,우편 연락처 등을 발주처에 보고하여 업무연락에 차질이 없도록 하여야 하며 변경되었을 경우에도 보고하여야 한다.

4. 설계서 등의 검토

4.1 감리원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서, 공사계약서 등의 계약내용과 당해공사의 조사 설계 보고서 등의 내용을 완전히 숙지하여 새로운 방향의 공법개선 및 예산절감을 기하도록 노력하여야 한다.

4.2 감리원은 설계서 등의 공사 계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장 실정과의 부합 여부 등 현장시공을 주안으로 하여 해당공사 시행 전에 검토하여야 하며, 특히 기술지원감리원은 기술적인 검토가 필요한 사항과 상주감리원이 요청한 사항에 대하여 세밀하게 검토하여야 한다.

4.3 감리원은 7.2항의 검토결과 불합리한 부분, 착오, 불명확하거나 의문사항이 있을 시는 그 내용과 의견을 발주처에 보고하여야 한다. 또한 시공자에게도 설계도서 및 산출내역서 등을 검토하도록 하여 검토결과를 보고 받아야 한다.

5. 설계서 등의 관리

5.1 감리원은 착공과 동시에 공사 설계도서 및 자료, 공사계약문서 등을 발주처로부터 인수하여 관리번호를 부여하고, 관리대장을 작성하여 공사관계자 이외의 자에게 유출을 방지하는 등 관리를 철저히 하여야 하며, 외부유출시 발주처(공사관리관)의 승인을 받아야 한다.

5.2 감리원은 설계서를 반드시 도면 보관함에 보관하여야 하고, 케비넷 등에 보관된 설계서 및 관리 서류의 명세서를 기록하여 내측에 부착하여야 하며, 시공자가 대여한 설계서도 필히 상기요령에 의거 보관토록 하여야 한다.

5.3 감리원은 공사 준공과 동시에 인수한 설계서 등을 발주처에 반납하거나 지시에 따라 폐기처분 한다.

5.4 감리원은 공사의 여건을 감안하여 각종 법규정, 표준시방서, KS규정집 및 필요한 기술서적 등을 비치하여야 한다.

6. 공사표지판 등의 설치

감리원은 시공자가 공사안내표지판을 설치하는 경우 시공자로부터 표지판의 제작방법, 크기, 설치장소 등이 포함된 표지판 제작설치 계획서를 제출 받아 검토한 후 설치하도록 하여야 한다.

7. 착공신고서 검토 및 보고

감리원은 건설공사가 착공된 경우에는 시공자로부터 착공신고서를 제출 받아 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 발주처에 보고하여야 한다.

8. 확인측량 및 현지조사

8.1 감리원은 착공과 동시에 시공자로 하여금 발주 설계도면과 실제 현장의 이상 유무를 확인하기 위하여 확인 측량을 조속히 실시토록 하여야 한다.

8.2 감리원은 사전 설계도서를 숙지하고 확인 측량 시 입회, 확인하여야 하며, 필요시 실시설계 용역회사 대표자의 위임장을 지참한 임직원 등과 합동으로 이상 유무를 확인토록 하여야 한다.

8.3 감리원은 현지 확인측량결과 설계내용과 측량결과가 현저히 상이할 때는 발주처에 측량결과를 보고한 후 지시를 받아 실제 시공에 착수하게 하여야 하며, 그렇지 아니한 경우에는 원지반을 원상태로 보존하게 하여야 한다.

8.4 감리원은 확인측량을 공동 확인 후에는 시공자에게 제반서류를 작성‧제출토록 하고, 확인측량 도면의 표지에 측량을 실시한 현장대리인, 실시설계 용역회사의 책임자(입회한 경우), 감리원이 서명‧날인하고 검토 의견서를 첨부하여 발주처에 보고하여야 한다.

8.5 건축공사 현장의 감리원은 필요한 경우 지적법에 따라 확인 측량된 대지 경계선내의 공사용 부지에 시공자로 하여금 전체동의 건축물을 배치하도록 하여 도로에 의한 사선제한, 대지 경계선에 의한 높이제한, 인동간격에 의한 높이 제한 등 건축물 배치와 관련된 규정에 적합한지 여부를 확인하고, 건축물 배치도면을 작성하게 하여 8.4항에서 정한 서류와 함께 발주처에 보고하여야 한다.

8.6 감리원은 공사 착공 후 빠른 시일 안에 공사 추진에 지장이 없도록 시공자와 합동으로 다음 각호의 사항을 현지 조사하여 시공 자료로 활용하고 당초 설계내용의 변경이 필요한 경우에는 설계변경 절차에 의거 처리하여야 한다.

가. 각종 재료원 확인

나. 지반 및 지질상태

다. 진입도로 현황

라. 인접도로의 교통규제 상황

마. 지하매설물 및 장애물

바. 기후 및 기상상태

사. 하천의 최대홍수위 및 유수상태 등

8.7 감리원은 8.6항의 현지조사 내용과 설계도서의 공법 등을 검토하여 인근 주민 등에 대한 피해발생 가능성이 있을 경우에는 시공자에게 제반사항에 대한 대책을 강구하도록 하고, 설계변경이 필요한 경우에는 설계변경 절차에 의거 처리하여야 한다.

9. 공사관련자 회의

감리원은 발주처(지원업무수행자)가 주관하는 관련자 합동회의에 참석하여 현장조사 결과와 설계서 등의 내용을 설명하고 필요한 사항에 대하여는 발주처(공사관리관)의 지시에 따라야 한다.

10. 공사 시행단계의 감리업무

10.1 감리원과 발주처은 과다한 행정업무로 인하여 감리원의 품질관리 업무에 지장을 초래, 부실공사 등의 문제가 야기되지 않도록 행정업무 간소화에 노력하여야 한다. 감리원은 감리업무 착수 후 빠른 시일 안에 당해 공사의 내용, 규모, 감리원 배치인원수 등을 감안하여 각종 행정업무중에서 최소한의 필요한 행정업무사항을 발주처와 협의 결정하고 이를 시공자에게도 통보하여야 한다.

10.2 감리원은 다음 각호의 문서가 포함된 감리보고서를 매월 또는 분기마다 감리보고서 작성지침에 따라 감리보고서를 작성하여 발주처에 제출하여야 하며 관련서식은 다음과 같다.

가. 월간 또는 분기감리보고서 작성서식

1) 공사추진현황 등

2) 감리원 업무일지

3) 품질시험⋅검사대장

4) 구조물별 콘크리트 타설현황(작업자 명부를 포함한다)

5) 검측요청⋅결과통보내용

6) 주요자재 검사 및 수불내용

7) 공사 설계변경 현황

8) 주요구조물의 단계별 시공현황

9) 콘크리트 구조물 균열관리 현황

10) 공사사고 보고서

나. 최종감리보고서 작성서식

1) 건설공사 및 감리용역 개요 등

2) 공사추진내용 실적

3) 검측내용 실적 종합

4) 품질시험⋅검사실적 종합

5) 주요자재 관리실적 종합

6) 안전관리 실적 종합

7) 분야별 기술검토 실적 종합

8) 우수시공 및 실패시공 사례

9) 종합분석

10.3 감리원은 감리업무 수행상 필요한 경우에는 다음 각호의 문서를 별지 서식을 참조하여 작성‧비치하여야 한다.

가. 문서접수 및 발송대장

나. 민원처리부

다. 품질시험계획

라. 품질시험‧검사성과 총괄표

마. 시험‧검사실적 보고서

바. 검측대장

사. 발생품(잉여자재)정리부

아. 안전보건 관리체제

자. 재해 발생현황

차. 안전교육 실적표

카. 협의내용 등의 관리대장

타. 사후 환경영향조사 결과보고서

파. 공사 기성부분 검사원

하. 감리원(기성부분, 준공) 감리조서

거. 공사 기성부분 내역서

너. 공사 기성부분 검사조서

더. 준공검사원

러. 준공검사조서

10.4 감리원은 시공자가 작성한 공사일지를 제출 받아 확인한 후 보관하여야 한다.

10.5 감리원은 시공자가 제출하는 모든 제반서류는 반드시 접수하여야 하며, 접수된 서류에 하자가 있을 경우에는 시공자에게 문서로 보완‧지시하여야 한다.

10.6 감리원은 시공자로 하여금 현장종사자(기능공 포함)의 견실시공 의식고취를 위한 현장 정기교육을 월1회 이상 당해 현장의 특성에 따라 실시하도록 하여야 한다.

11. 감리원의 의견제시 등

11.1 감리원은 공사 중 당해 공사와 관련하여 시공자의 공법변경 요구 등 중요한 기술적인 사항에 대하여 이를 검토하고 의견서를 첨부하여 발주처에 보고하여야 하고 상당한 시간과 비용이 소요되거나 제3자에게 의뢰하여야 하는 전문성이 요구되는 내용에 대하여는 제3자에게 의뢰하여야 한다.

11.2 감리원은 스스로 공사시공과 관련하여 검토한 내용에 대하여 필요하다고 판단될 경우 발주처 또는 시공자에게 그 검토의견을 서면으로 제시할 수 있다.

11.3 감리원은 공사 시행중 예산이 변경되거나 계획이 변경되는 중요한 민원이 발생된 때에는 발주처가 민원처리를 할 수 있도록 검토의견서를 첨부하여 발주처에 보고하여야 한다.

11.4 감리원은 발주처(지원업무수행자)이 민원사항 처리를 위하여 조사와 서류 작성의 요구가 있을 때에는 특별한 사유가 없는 한 적극 협조하여야 한다.

11.5 감리원은 공사와 직접 관련된 경미한 민원처리는 직접 처리하여야 하고 전화 또는 방문 민원을 처리함에 있어 민원인과의 대화는 원만하고 성실하게 하여야 하며 시공자와 협조하여 적극적으로 해결방안을 강구‧시행하여야 하고, 그 내용을 민원 처리부(별지 제19호 서식)에 기록‧비치하여야 한다. 경미한 민원처리 사항 중 중요하다고 판단되는 경우에는 검토의견서를 첨부하여 발주처에 보고하여야 한다.

14. 수명사항의 처리

14.1 감리원은 시공자에게 공사와 관련하여 지시하는 경우에는 다음과 같이 처리하여야 한다.

가. 감리원이 공사와 관련하여 시공자에게 지시할 때에는 서면으로 함을 원칙으로 하며, 현장 여건에 따라 시급한 경우 또는 경미한 사항에 대하여는 우선 구두지시로 시행토록 조치하고 추후에 이를 서면으로 확인하여야 한다.

나. 감리원의 지시내용은 당해공사 설계도면 및 시방서 등 관계규정에 근거하여 구체적으로 기술하여 시공자가 명확히 이해 할 수 있도록 지시하여야 한다.

다. 감리원은 지시사항에 대하여 그 이행상태를 수시 점검하고 시공자로부터 이행 결과를 보고 받아 기록‧관리하여야 한다.

14.2 감리원은 발주처로부터 지시를 받았을 때에는 다음과 같이 처리하여야 한다.

가. 감리원은 발주처로부터 지시를 받은 내용을 기록하고 신속하게 이행되도록 조치하여야 하며, 그 이행결과를 점검‧확인하여 발주처에 서면으로 조치결과를 보고하여야 한다.

나. 감리원은 당해 지시에 대한 이행에 문제가 있을 경우에는 의견을 제시할 수 있다.

다. 감리원은 각종지시, 통보사항 등을 감리원 전원이 숙지하고 이행에 철저를 기하기 위하여 교육 또는 공람 시키도록 하여야 한다.

15. 품질관리

15.1 감리원 당해 건설공사의 설계도서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며 시공 후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종 또는 부위를 중점 품질관리대상으로 선정하여 타 공종에 비하여 우선적으로 품질관리 상태를 입회, 확인하여야 한다.

15.2 감리원은 공종별 중점 품질관리방안을 수립하여 시공자로 하여금 이를 실행토록 지시하고 실행결과를 수시로 확인하여야 한다.

15.3 품질관리에 있어 어느 것 하나 중요하지 않은 것은 없다. 그러나 그 중요성을 너무 강조하다 품질관리가 용이하고 상대적으로 중요성이 낮은 공종은 철저히 관리되고 중요도가 높은 공종은 자칫 지나쳐 버리는 우를 범해서는 안 된다.

15.4 감리원은 시공자에게 각 공정마다 준비과정에서부터 작업완료까지의 각 과정마다 정밀도 및 품질확보를 위한 수단, 절차 등을 규정한 총제적 품질 관리계획서(TQC : Total Quality Control)를 작성, 제출토록 하고 이를 검토, 확인하여야 한다.

15.5 감리원은 당해 공사에 사용될 재료가 규격 및 품질기준에 적합한 재료가 선정되고 시공 시 품질관리가 효과적으로 수행되어 하자 발생을 사전에 예방할 수 있도록 품질관리시험 계획을 지도한다.

15.6 감리원은 당해 공사의 품질관리를 효율적으로 수행하기 위하여 공종별 시험 종목과 시험빈도 및 품질기준을 숙지하고 시험성과표의 검토 및 확인 업무를 수행하여야 한다.

15.7 건설공사 품질시험‧검사를 실시하여야 할 건설공사의 발주처 또는 시공자는 국‧공립시험기관 또는 건설교통부장관에게 등록한 품질검사 전문기관에 품질시험의 실시를 대행하게 할 수 있다.

16. 시공관리

16.1 감리원은 시공자로부터 시공계획서를 공사착공일로부터 30일 안에 제출 받아 이를 검토‧확인하여 7일안에 승인한 후 시공토록 하여야 한다.

16.2 감리원은 시공계획서를 공사 착공계와 별도로 실제 공사 착수전에 제출 받아야 하여 공사 중 시공계획서에 중요한 변경내용이 발생한 경우에는 그 때마다 변경 시공계획서를 제출 받아 검토‧확인하여 승인한 후 시공토록 하여야 한다.

16.3 감리원은 시공자로부터 각종 구조물 시공 상세도 및 암 발파 작업 시공 상세도를 사전에 제출 받아 제반사항을 고려하여 검토‧확인하고 승인한 후 시공토록 하여야 한다.

16.4 시공 상세도는 설계도면 및 시방서 등에 개략적으로 표시된 부분을 명확히 하여 줌으로써 시공 상의 착오방지 및 공사안전을 확보키 위한 수단으로 공사조건에 따라 감리원과 시공자가 필요한 시공 상세도를 선정하고, 시공 상세도(Shop Drawing) 검토‧확인 시 까지 구조물 시공을 허용하지 말아야 한다.

16.5 감리원은 공사가 설계도서 및 시방서 등에 일치되게 시공되는가를 현장에서 확인하는 것이 감리원의 업무 중에서 가장 중요하고 기본적인 책무인 점을 명심하여 모든 업무에 우선하여 현장시공 확인업무를 수행하여야 한다.

16.6 감리원은 시공계획서에 의한 일정단계의 작업이 완료되면 시공자로부터 검측 요청서를 제출받아 그 시공상태를 확인하는 것을 원칙으로 하고, 가능한 한 공사의 효율적인 추진을 위하여 시공과정에서 수시 입회‧확인토록 하여야 한다.

16.7 검측절차

현장시공완 료	⇒	시 공 자 담당기술자 점 검		⇒	검측요청서 제 출	⇒	감 리 원 현장검측	⇒	검측결과 통 보		합격 ⇒	다음단계공종착수
		재 시 공 보 완			불합격시
					(시공점검표, 시험성과)

16.8 검사항목

감리원은 세부공종별로 검측한 검사항목을 계약설계도면, 시방서, 건설기술관리법령, 책임감리 현장참여자 업무지침서 등의 관계규정의 내용을 기준하여 구체적인 내용으로 작성하며 공사목적물을 소정의 규격과 품질로 완성하는데 필수적인 사항을 포함하여 점검항목을 결정하여야 한다. 이러한 검사항목은 감리편람 등에 수록한 내용을 공사내용에 따라 취사선택하여 활용하고, 공사 특수성에 따라 필요시 추가 점검항목을 결정하여야 한다.

16.9 감리원은 설계시 추정된 암반선에 대하여 시공중 실제 암반선이 노출되면 암판정위원회를 구성하여 직접 육안으로 확인하고, 필요한 시험을 실시하여 더욱 정확한 판정을 하여야 한다.

16.10 특수공법의 검토

특수한 공법이 적용되는 경우의 기술검토 및 시공상 문제점 등의 검토를 할 때에는 감리원은 감리전문회사의 본사 기술지원감리원 등을 활용하고, 필요시 발주처과 협의하여 외부의 국내‧외 전문가의 자문을 받아 검토 의견을 제시할 수 있으며 특수한 공종에 대하여 외부 전문가의 감리 참여가 필요하다고 판단될 경우 발주처과 협의하여 조치할 수 있다.

16.11 기술검토 의견서

감리원은 시공 중 발생되는 기술적 문제점, 설계변경사항, 공사계획 및 공법 변경문제, 설계도면과 시방서 상호간의 차이, 모순 등의 문제점, 기타 시공자가 시공중 당면하는 문제점 및 발주처이 해당공사의 기술검토를 요청한 사항에 대하여 현지실정을 충분히 조사, 검토, 분석하여 시공자가 공사를 원활히 수행할 수 있는 해결방안을 제시하여야 한다. 중요한 기술검토는 반드시 서면으로 기술검토서를 작성‧제출하여야 한다. 기술검토서에는 상세 기술검토내역 또는 근거가 첨부되어야 한다.

16.12 주요기자재 공급원 승인

가. 감리원은 시공자로 하여금 공정계획에 의거 사전에 주요 기자재(K.S 의무화 품목등) 공급원 승인신청서를 자재반입 10일전까지 제출토록 하여야 한다. 이때 공급원의 사업자등록증 사본, 공인기관 시험성과표 등을 첨부해야 하며, 관련 법령의 규정에 의하여 품질검사를 받았거나, 품질을 인정받은 재료에 대하여는 예외로 한다.

나. 감리원은 시공자로 하여금 공정계획에 의거 사전에 주요 자재 수급계획을 수립하여 자재가 적기에 현장에 반입되도록 검토하고 지급자재 수급계획에 대하여는 발주처에 보고하여 수급차질에 의한 공정 지연이 발생하지 않도록 하여야 한다.

다. 감리원은 공사 목적물을 구성하는 주요기계, 설비, 제조품, 자재등 주요 기자재가 공급원 승인을 받은 후 현장에 반입되면 시공자로부터 송장 사본을 접수함과 동시에 반입된 기자재를 검수하고 그 결과를 검수부에 기록‧비치하여야 한다.

16.13 지장물 등 철거, 확인

가. 감리원은 공사중에 지하매설물 등 새로운 지장물을 발견하였을 때에는 시공자로부터 상세한 내용이 포함된 지장물 조서를 제출 받아 이를 확인한 후 발주처에 조속히 보고하여야 한다.

나. 감리원은 기존 구조물을 철거할 때에는 시공자로 하여금 현황도(측면도, 평면도, 상세도, 기타 수량산출시 필요한 사항)와 현황사진을 작성하여 제출토록 하고, 이를 검토‧확인하여 발주처에 보고하고 설계변경시 계상하여야 한다.

16.14 감리원이 시공자에게 재시공 또는 공사중지명령 등 필요한 조치를 취한 때에는 이를 발주처에 보고하여야 한다. 다만, 발주처가 정하는 경미한 시정사항 및 재시공은 보고를 생략할 수 있다.

	조 사 시 험			․기술검토 ․경미한설계변경 ․시공지시 (감 리 원)
․사업계획변경 ․현장여건불일치 ․신공법개발			․발주기관의 지시 ․시공자의 설계변경 여건보고 ․시공자의 개선 제안 공법 ․경미한 설계변경			방침결정 (발주기관)			설 계 변 경 ( 감 리 원 )			계약금액 조정 (감 리 원)		변경계약 (발주기관)
			․설계변경사유서 ․설계변경도면,개략적인 수량 증감내역 ․개략적인 공사비 증감내역						․설계변경개요서 ․설계변경도면,시방서,계산서 ․수량조서 및 산출조서 ․기타 필요한 서류			․설계변경 ․물공량 정산 ․물가변동
							변경시공지시 (감 리 원)			변경시공지시 (감 리 원)
							(단순한 경우)			(복잡,중대한 경우)

16.15 설계변경 및 계약금액 조정 절차

시 공 자						감 리 회 사											발 주 기 관
조사, 시험 변경설계도서 작성 제출			설 계 자 (감 리 원)			심 사 자 (기술지원감리원)					설계변경제출 (대표자명의)			검 토 (공사관리관)							결 재

17. 공정관리

17.1 감리원은 당해 공사가 정해진 공기 내에 시방서, 도면 등에 의거하여 소요의 품질을 갖추어 완성될 수 있도록 공정관리의 계획수립, 운영, 평가에 있어서 공정진척도 관리와 기성관리가 동일한 기준으로 이루어질 수 있도록 감리하여야 한다.

17.2 감리원은 공사 착공일로 부터 30일 안에 시공자로부터 공정관리계획서를 제출 받아 조속한 시일 내에 검토하여 승인하고 이를 발주처에 제출하여야 한다.

17.3 감리원은 일정관리와 원가관리, 진도관리가 병행될 수 있는 종합관리 형태의 공정관리가 되도록 조치하여야 한다.

17.4 감리원은 공사 진도율이 계획공정대비 월간 공정실적이 5% 이상 지연(계획공정대비 누계공정 실적이 100%이상일 경우는 제외)되거나 누계공정 실적이 10% 이상 지연될 때는 시공자로 하여금 부진사유 분석, 만회대책 및 만회공정표 수립을 지시하여 정상 공정을 회복할 수 있도록 하여야 한다.

17.5 감리원은 시공자가 준공기한 연기를 제출할 경우 이의 타당성을 검토‧확인하고 검토의견서를 첨부하여 발주처에 보고하여야 한다.

18. 안전관리

18.1 감리원은 시공자가 제반규정에 의하여 작성한 건설공사 안전관리계획서를 공사 착공 전에 제출 받아 적정성을 확인하여야 하며, 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 시공자로 하여금 이를 보완하도록 하여야 한다.

18.2 감리원은 시공자의 안전관리자를 지도‧감독하도록 하여야 하며, 공사전반에 대한 안전관리계획의 사전검토, 실시확인 및 평가, 자료의 기록유지 등 사고예방을 위한 제반 안전관리 업무에 대하여 확인을 하도록 하여야 한다.

18.3 감리원은 시공회사의 안전관리책임자와 안전관리자 등에게 교육시키고 이들로 하여금 현장근무자에게 안전교육을 실시토록 지도‧감독하여야 한다.

18.4 감리원은 매 분기별 시공자로부터 안전관리 결과보고서를 제출받아 이를 검토하고 미비한 사항이 있을 시는 시정조치 하여야 한다.

19. 시설물의 인수‧인계

19.1 감리원은 시공자로 하여금 당해 공사의 예비준공검사(부분준공, 발주처의 필요에 의한 기성부분 포함) 완료 후 14일 이내에 시설물의 인수‧인계를 위한 계획을 수립토록 하고 이를 검토하여야 한다.

19.2 감리원은 시공자로부터 시설물 인수‧인계 계획서를 제출받아 7일 이내에 검토, 확정하여 발주처 및 시공자에게 통보하여 인수‧인계에 차질이 없도록 하여야 한다.

19.3 감리원은 발주처와 시공자간의 시설물 인수‧인계의 입회자가 된다.

19.4 감리원은 시공자가 제출한 인수‧인계서를 검토‧확인하며 시설물이 적기에 발주처에 인수‧인계 될 수 있도록 한다.

19.5 감리원은 시설물 인수‧인계에 대한 발주처 등의 이견이 있는 경우, 이에 대한 현황파악 및 필요대책 등의 의견을 제시하여 시공자가 이를 수행토록 조치한다.

19.6 인수‧인계서는 준공검사 결과를 포함하는 내용으로 한다.

19.7 시설물의 인수‧인계는 준공검사 시 지적사항 시정완료일부터 14일 이내에 실시하여야 한다.

19.8 감리원은 당해 공사와 관련한 감리기록 서류 중 발주처에 인계할 문서의 목록을 발주처와 협의 작성하여야 하며, 감리보고서 작성지침에 따라 작성한 감리보고서를 감리용역 준공후 14일 이내에 발주처에 인수‧인계하여야 하며, 감리전문회사도 이를 보관하여야 한다.

20. 유지관리

당해 감리전문회사 대표자는 발주처가 유지관리상 필요하다고 인정하여 기술자문 요청 등이 있을 경우에는 이에 협조하여야 하며, 전문적인 기술등으로 외부 전문기술 또는 상당한 노력이 소요되는 경우에는 발주처과 별도 협의하여 결정한다.

21. 하자보수관련

감리전문회사 대표자 및 감리원은 공사 준공후 발주처과 시공자간의 시설물의 하자보수 처리에 대한 분쟁 또는 이견이 있는 경우 검토 의견을 제시하여야 하며 발주처가 필요하다고 인정하여 하자보수 대책수립을 요청할 경우 이에 협조하여야 한다. 단, 감리기간이 지난 후에 수행하여야 할 경우에는 발주처은 별도의 실비를 감리원에게 지급하여야 한다. 다만 하자사항이 감리부실에 기인할 경우에는 제외한다.

22. 과업지시 내용의 해석

본 과업지시 내용에 관하여는 관련법 해석상 하자가 없는 한 발주처의 해석에 우선한다. 이때의 해석은 건설기술관리법 또는 정부기관의 제 기준에 준한다.

Ⅳ.  보안 및 기타 유의사항

1. 보안대책

1.1 감리용역 착수 시 감리종사자의 보안각서를 제출한다.

1.2 국가보안상 중요하다고 생각되는 모든 기록과 자료는 시건장치가 되어 있는 함에 보관하고 열쇠는 책임감리원이 소지하여야 한다.

1.3 모든 비밀문서는 관리번호를 부여하고, 보관관리기록부에 기록한 자로서 시건장치가 이중으로 되어 있는 함에 보관하여 열쇠는 책임감리원이 소지하여야 한다.

1.4 감리원은 본 업무와 관련 있는 모든 기록과 자료에 대하여 업무와 관련 없는 일에 사용할 수 없으며, 발주처의 사전 서면승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

1.5 편집된 모든 도서 및 기타 재료를 다른 목적에 이용 또는 이용토록 할 수 없으며, 감리업무 수행 중 취득한 사실을 누설하여서는 안 되며 누설로 인하여 문제점이 발생될 시에는 감리원은 물론 감리전문회사가 모든 책임을 진다.

1.6 감리용역 과업자료의 분실, 도난, 누설을 방지하고 자료의 철저한 보안을 위하여 감리원의 교육을 철저히 행한다.

2. 경과조치 등

2.1 본 과업지시 내용은 계약과 동시에 효력을 발생한다.

2.2 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항 중 감리 업무와 관련 추가하여야 할 업무내용 또는 해석상 이견이 발생될 시는 관련법규에 의거 발주처과 협의 조정한다.