「항공안전종합통제시스템(ATFMS) 구축 실시설계 용역」

과업지시서

2014. 3.

국 토 교 통 부

항공교통센터

목   차

Ⅰ. 일반사항	3

Ⅱ. 과업의 내용 및 실시요령	15

Ⅲ. 설계도서 작성 및 성과품 납품	23

Ⅳ. 예정공정표	28

【부록】

[붙임 1] 보안각서	29

[붙임 2] 책임기술자 선임계	30

[붙임 3] 하도급계획서	31

[붙임 4] 준공(기성) 검사원	33

[붙임 5] 주간공정보고	34

[붙임 6] 월간공정보고	35

[붙임 7] 국외여비 정산서	36

[붙임 8] 용어의 정의	37

Ⅰ. 일 반 사 항

Ⅰ. 일반 사항

제1조(과업의 명칭)

본 과업의 명칭은 『항공안전종합통제시스템(ATFMS) 구축 실시설계용역』이라 한다.

※ ATFMS(Air Traffic Flow Management System)

제2조(목적)

본 과업의 목적은 증가하는 항공교통량에 대비하여 최적의 항공교통흐름을 확보하고, 위기상황 발생할 경우 항공기의 안전을 관리하기 위한 실시설계를 시행함에 있다.

제3조(위치)

본 과업의 위치는 『대구광역시 동구 상매동 231-1~4, 산96번지 일원』으로 한다.

<제2 항공교통센터 부지 내 구축>

구 분	제2 항공교통센터	항공안전종합통제센터	비고
대지면적	26,871㎡	-	제2 ATC 대지 일부 활용
건축면적	4,154.89㎡	1,617.22㎡
연면적	9,441.83㎡	3,826.53㎡	추정 면적

제4조(용어 정의)

1. 본 과업지시서의 “갑”이란 발주기관인 항공교통센터장을 말하며, “을”이란 본 설계용역 계약상대자의 대표자를 말한다.

2. ‘과업’이란 전차용역에서 시행한 기본설계용역 성과물을 토대로 항공안전종합통제센터의 운영개념을 정립하고, 그 운영개념에 따른 항공안전종합통제시스템의 규격, 성능, 인터페이스, 규모, 배치, 형태, 공사방법과 기간, 공사비, 유지관리 방안 등을 조사, 비교․분석하여 최적의 구축안을 작성·납품하는 것을 말한다.

3. ‘용역감독자”란 “갑”이 용역 전반에 관한 감독업무를 대리하도록 임명한 자를 말한다.

제5조(적용 규정)

본 과업은 다음의 법령 및 규정을 적용하여야 한다.

1. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

2. 국가재정법 및 회계예규 등 관련 법령

3. 항공법 및 전파법

4. 정보통신공사업법 및 전기설비기술기준

5. 건설기술관리법 및 건설산업기본법

6. 주요 정보통신기반시설보호법

7. 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법

8. 전기․통신 및 소방관계 법령

9. 국가기술자격법 및 엔지니어링 기술진흥법

10. 에너지이용합리화법

11. 특정 조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정

12. ICAO, FAA, Euro-Control 등 국내․외 관련법령 및 기술기준

13. 본 과업 관련 법령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 지방자치단체 조례 및 군 관련규정 등 제반 법규 적용

제6조(용역 기간)

본 과업의 계약기간은 착수일로부터 240일로 한다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 “갑”의 승인을 받아 변경할 수 있다.

1. 천재지변으로 인하여 과업 수행에 차질이 있을 때.

2. "갑"의 계획 변경으로 용역 기간의 변경이 필요한 경우

제7조(과업의 범위)

본 과업의 범위는 다음의 각 호와 같다.

1. 시스템 구축 부문

가. “항공안전종합통제센터” 운영개념 정립

나. ATFMS 구축방안

다. 공역관리시스템 구축 방안

라. 협력적 의사결정(CDM)체계 구축 방안

마. 항행안전시설 종합상황시스템 구축방안

바. 외부 인터페이스 및 네트워크 시스템 연계방안

사. 재난 대비 방안

아. 설계도서 및 제안요청서 작성

2. 지원․연구부문

가. 항공교통관제 수용량 산정․관리 방안

나. ATFMS 해외 운영사례 조사

다. ATFMS 홍보방안 시행

라. 항공안전종합통제센터 운영 및 유지관리(주체․인력․예산 등) 방안

마. 가칭 “항공안전종합통제센터” 명칭 재검토

제8조(분쟁 처리)

본 과업의 내용중 상호 간에 이견이 발생하였을 경우에는 상호 협의하여 결정한다. 단, 상호 간에 협의가 안되는 경우에는 “갑”의 해석에 따른다.

제9조(공동수급 또는 하도급)

본 과업은 항공안전종합통제센터의 운영개념 등을 명확히 정립하기 위하여 항공법 제2조 제3호의 “항공업무” 전문 업체와 공동수급 할 수 있다. 다만 공동수급이 불가능한 경우에는 『하도급계획서』를 첨부된 붙임3의 서식에 따라 평가 자료와 함께 제출하여야 한다.

제10조(기술제휴)

1. “을”은 본 과업을 수행함에 있어 자체 기술이 부족한 분야에 대하여 타 업체 또는 전문기술자와 기술제휴 또는 자문 등을 받아 과업을 수행하여야 한다.

2. 타 업체 또는 전문기술자와 기술제휴 또는 자문을 받고자 할 때에는 “갑”의 승인을 받은 후에 이를 시행하여야 한다.

3. 타 업체 또는 전문기술자와 기술제휴가 불가피하다고 판단하여 “갑”이 기술제휴를 요구할 경우 “을”은 이에 따라야 한다.

제11조(용역업체의 의무)

1. “을”은 본 과업을 수행함에 있어 일반적으로 통용되는 기준과 최신의 기술에 따라 신의성실의 자세로 “갑”에게 최대 이익이 되도록 계약의무를 완수하여야 한다.

2. "을"은 전 1호의 의무를 모든 참여기술자에게 교육하여야 한다. 만일 참여기술자가 의무를 크게 위반하였다고 판단되는 경우에는 즉시 해당 참여기술자를 적정한 절차에 따라 교체하여야 한다.

3. "을"은 본 과업의 용역감독자의 적법한 지시에 따라야 한다. 다만 용역감독자의 지시가 부당하다고 판단되는 경우에는 즉시 “갑”에게 보고하여 부당여부를 확인 받을 수 있다.

4. "을"은 과업지시서에서 요구하는 보고서 및 납품 성과물 등을 지정 납기일 내에 “갑”에게 제출하여야 한다.

5. "을"은 평가자료로 제출한 용역 참여기술자를 변경없이 참여시켜야 한다. 다만 참여기술자의 사고, 지병 등 부득이한 사정으로 변경하고자 할 경우에는 적정한 절차에 따라 “갑”의 승인을 받은 후 해당 참여기술자를 교체하여야 한다.

6. 본 과업에서 요구되는 각종 인․허가 사항은 “을”이 사전에 해당 기관과 충분히 협의하여 해당 구비서류를 작성 또는 발급받아 제출하고, 그 경비를 부담하여야 한다.

7. “을”은 준공 전·후를 막론하고 설계상의 잘못이 발견 되었을 경우에는 "갑"의 승인여부를 불문하고 무상으로 설계를 수정·보완하거나, 시공 과정에서 발생된 해당 부분의 손해를 책임을 져야 한다.

8. “을”은 총사업비를 산정함에 있어 고의 또는 중대한 과실이 있다고 판단되거나, 발견되었을 경우에는 일정기간 공공사업의 입찰 참가 자격이 제한 될 수 있다.

9. 추정공사비는 “갑”이 기본설계에서 정한 소요예산을 가능한한 초과하지 않도록 하여야 한다.

제12조(특허권의 사용)

“을”은 본 과업과 관련하여 제3자의 특허권, 지식권, 소유권 등을 사용할 때에는 그 권리의 사용에 관한 비용부담 등 일체의 책임을 져야한다.

제13조(위반사항의 조치)

“을”이 본 과업 수행 상 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하였을 경우에는 특별한 사유가 없는 한 계약 위반행위로 간주하며, 관계규정에 따라 부정당업체 등의 제재를 받을 수 있다.

1. 계획공정 대비 이행실적이 현저하게 미달되었거나 주요 요구사항이 기한 내에 이행되지 않아서 계약기간 내에 과업 이행능력이 없다고 인정될 때

2. 본 과업과 관련된 총사업비 산정 등에 고의 또는 중대한 과실이 인정될 때

3. 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 때

제14조(보고)

1. ‘착수보고회’는 착수일로부터 늦어도 10일 이내에 개최하여야 한다.

2. ‘중간보고회’는 “갑”과 협의하여 개최하되 개최일 7일전까지 실시설계용역 중간 보고서를 제출하여야 한다.

3. ‘최종보고회’는 “갑”과 협의하여 개최하되 개최일 10일전까지 실시설계용역 최종보고서를 제출하여야 한다.

4. ‘수시보고회’는 주요 사항이 있을 경우 “갑” 또는 “을”의 요구에 따라 개최할 수 있다.

5. 기타 “갑” 또는 “을”의 요구에 따라 용역 추진상황 점검을 위한 보고회의, 공정회의 또는 자문회의 등을 개최할 수 있다.

6. 각종 보고서별 보고 시기는 다음과 같다.

번호	종 류	제출목적	수량	제 출 시 기
1	착수보고서 (과업수행계획서 포함)	승인용	2	착수 후 10일 이내
2	주간 / 월간보고	보고용	1	매주 목요일 / 익월 5일전
3	ATFMS 운영방안 수립보고서 및 유지관리방안 수립보고서	보고용	각 1부	착수 후 90일 이내
4	중간보고서	보고용 (Binder)	10	진도 60% 시점 또는 140일 이내
5	최종보고서(안)	보고용 (Binder)	10	진도 83% 시점(준공 40일전)
6	제안요청서(안)	보고용 (Binder)	10	진도 75% 시점(준공 60일전)
7	요약보고서(안)	보고용 (Binder)	10	진도 83% 시점(준공 40일전)
8	관제연구보고서(안)	보고용 (Binder)	10	진도 83% 시점(준공 40일전)

※ 보고서 작성은 과업지시서 제24조에 따른다.

제15조(과업의 절차)

1. “을”은 과업 수행 중 각 단계별 중요한 사안이나 관계기관과 협의가 필요한 사항에 대하여는 검토 및 처리 의견을 "갑"에게 보고하여 방침결정을 받은 후 다음 단계로 진행하여야 한다.

2. “을”은 과업수행 중 관련 기관 또는 부서의 협조 사항이 있을 경우 그 내용을 “갑”에게 보고하고 “갑”의 지시에 따라야 한다.

3. “을”은 과업진도와 과업추진 내용에 대하여 “갑”의 제출 요구가 있을 경우에는 즉시 보고하여야 한다.

4. “을”은 관계기관 협의에 필요한 “갑”의 자료 요구가 있을 경우 지정기한 이내에 제출하여야 한다.

5. “을”은 최종보고서(안) 및 일체의 용역성과품을 용역준공일 40일전에 ˝갑˝에게 제출하고, 검토 받은 후 인쇄·납품하여야 한다.

제16조(성과품의 납품)

1. 모든 성과품은 규격, 편집, 인쇄방법 등을 사전에 “갑”과 협의한 후에 제본 및 납품하여야 한다.

가. 도면은 작성자, 책임기술자 및 검토자의 서명이 있어야 한다.

나. 최종보고서에는 참여기술자 명단을 다음 양식에 따라 작성하여 마지막 페이지에 편철하여야 한다.

<용역 참여기술자 명단>

분 야	직 책	자격종목 및 등록번호	생년월일	직 위	성 명	서 명	용역과업 수행내용	참여기간

제17조(용역 사진)

“을”은 착수 일부터 이행한 주요 공정의 단계별, 내용별로 편집한 사진을 CD-ROM에 수록하여 “갑”에게 제출하여야 한다.

제18조(설계 변경)

본 용역은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 예산의 범위 내에서 설계 변경 또는 정산할 수 있다.

1. 천재지변 등 불가항력의 사유로 변경이 필요할 경우

2. “갑”의 계획 변경에 따라 과업의 내용이 증감 되었을 경우

3. 기타 “갑”이 필요하다고 인정할 경우

제19조(성과품의 소유)

1. 본 과업에서 생산된 일체의 성과품은 “갑”의 소유로 한다. 어느 누구도 “갑”의 승인 없이 제3자에게 이를 제공 또는 본 과업의 목적 이외에 사용할 수 없다.

2. 본 과업에서 생산된 저작권은 “갑”의 소유로 한다. 어느 누구도 저작권에 대한 권리를 주장할 수 없다.

3. “을”은 본 과업에서 생산된 일체의 성과품이 남김 없이 “갑”에게 제출되었음을 증명하는 확인서를 준공서류에 첨부하여야 한다.

제20조(보안 대책)

1. “을”은「항공교통센터 보안업무지침(항공교통센터 훈령 제180호)」제57조(외부 용역발주 시 보안대책) 규정에 따라 대표자 및 용역참여자가 작성한 보안각서를 착수계와 함께 제출하여야 한다.

2. “을”은 모든 용역참여자에게 보안교육을 실시하여야 한다.

3. “을”은 용역참여자를 변경하고자 할 경우 해당자의 보안각서를 징구하고, 인계인수를 철저히 하여 본 용역에서 이탈한 자에 따른 용역관련 자료 유출을 방지하여야 한다.

4. “을”은 용역을 위하여 출입하는 항공교통센터 등 관련 시설이 국가 중요 보안시설임을 숙지하고, 관련 보안규정을 준수하여야 하며, 이를 위한 모든 보안대책을 강구하여야 한다.

5. “을”은 용역기간은 물론 용역 종료 후에도 보안대책을 준수할 책임과 의무가 있으며, 본 용역의 모든 참여자에게도 동일하게 적용된다.

6. “을”은 본 용역에 투입되는 모든 인원에 대하여 시설, 장비, 도서관리 등에 관한 보안교육을 정기적으로 실시하고, 그 내용을 보안교육일지에 기록·유지하여야 한다.

7. “을”은 용역 내용이 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있음을 숙지하고, 용역의 장소에 대한 외부인 접근방지대책을 수립․시행하여야 한다.

8. “을”은 용역관련 도서류 등을 별도 보관함에 구분하여 보관토록 하고, 관리책임자 정․부를 지정하여 관리하여야 한다.

9. “을”은 용역에서 생산된 모든 원고, 자료 및 저장매체 등을 최종성과품이 납품되었을 때 완전하게 파기 및 삭제하여야 한다.

10. “을”은 용역성과품을 발간할 경우에는 비밀취급이 인가된 업체를 지정·이용하고, ˝갑˝이 사실여부를 사전에 확인하도록 하여야 한다.

11. “을”은 용역에서 알게 된 내용과 자료들을 “갑”의 허락 없이 임의로 소유하거나 외부로 유출하여서는 안 된다.

12. “을”은 용역관련 회의자료 등을 최대한 제한 발행하고, 회의가 종료되었을 경우 즉시 회수하여 파기하여야 한다.

13. “을”은 용역참여자가 과업수행과정에서 취득한 내용과 각종 자료들을 “갑”의 허락 없이 임의로 제3자에게 유출·누설 또는 제공하여 국가에 손해 또는 피해를 주었을 때에는 부정당업자로 지정될 수 있으며 해당 손해에 대하여 배상책임을 진다

※ 누출금지 정보란 IP정보, 네트워크 상세 구성도, 시스템 상세구성도, 개인정보 및 레이더자료 중 군용기 관련자료 등을 말한다.

14. “을”은 용역을 수행할 때 용역참여자에 대한 보안대책으로 참여인원을 최소화하고, 정규직원이 과업을 수행하도록 하여야 한다.

15. “을”은 용역을 수행할 때 용역참여자 이외의 인원이 용역장소에 접근할 수 없도록 적정한 접근방지대책을 강구하여 출입을 통제하여야 한다.

16. “을”은 용역 기초자료와 성과물 등에 대한 보안대책을 강구하여 대외비 또는 비밀의 경우에는 인쇄․열람에 따른 보안규정을 준수하여야 한다.

17. “을”은 용역성과물을 “갑”이 정해준 제출요구 또는 납품물량을 초과하여 발행하지 않아야 한다.

18. “을”은 용역에서 생산된 모든 용역자료 및 성과품을 “갑”의 승인 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 되며, 전자파일·프린트 또는 복사본은 반드시 삭제·분쇄 또는 소각 방법으로 폐기하여야 한다.

19. “갑”은 용역기간 중 “을”의 보안관리 실태에 대한 점검을 실시할 수 있으며 “을”은 이에 협조하여야 한다.

20. “을”은 용역에 사용되는 컴퓨터 등을 정보보안업무지침(항공교통센터 훈령 제217호)에 따라 보안조치(암호설정, 보안USB사용, 인터넷 차단 등)를 실시하여야 한다.

21. 정보통신기반보호법, 국토교통부 정보보안업무규정, 제어․관리시스템 보안관리지침, 주요정보통신기반시설 보호지침 등의 해당 법령 또는 규정에 위배되지 않도록 하여야 한다.

22. 정보보안법규 등에 따른 정보보호 대책을 보안대책 안에 수립․이행하여야 한다.

제21조(손해 배상)

1. “을”은 용역에서 고의 또는 과실로 “갑” 또는 제3자에게 재산상의 피해 또는 손해를 끼친 경우에는 「엔지니어링산업진흥법」 제31조 제3항에 따라 배상하여야 한다.

2. “을”은 전 1항의 손해배상 책임을 보장하기 위하여「엔지니어링산업진흥법」 제31 및 같은법 시행령 제42조에 따라 보험이나 공제에 가입하여야 한다.

3. “을”은 용역 준공 전까지 보험증서 또는 공제증서를 “갑”에게 제출하여야 한다.

Ⅱ. 과업의 내용 및 실시요령

Ⅱ. 과업의 내용 및 실시요령

제22조(일반 사항)

“을”은 본 과업에서 다음 각 호의 용역보고서 및 국내․외 관련지침 등을 면밀히 검토․분석하고, 실시설계를 하여야 한다.

1. 항공교통관제시설 현대화사업 기본설계 또는 실시설계 용역

2. 제2 항공교통센터 구축 기본설계 또는 실시설계 용역

3. 항공안전종합통제센터 구축 기본설계용역

4. 항공교통관리 중장기 계획 수립용역 등

5. 항공교통관제시설 제작․구매 및 설치사업 제안요청서(RFP)

6. 제2 ATC 항공교통관제시설 제작․구매 및 설치사업 제안요청서(RFP)

7. 국내․외 Air Traffic Flow Management System(ATFMS) 관련 기준 및 ICAO Aviation System Block Upgrade(ASBU) 정책

제23조(주변국 등 연계)

“을”은 본 과업에서 다음 각 호와 연계할 수 있도록 인터페이스 구성 및 상세설계를 하여야 한다.

1. 인접국(중국, 일본 등) ATFMS간 연계를 위한 시스템 확장성 및 유지보수성 고려

2. ATFMS의 안정적인 운영을 위한 이중화 구성

3. 인천 및 대구 ACC(Area Control Center) 간 연계

4. 국내․외 관제기관(TWR, APP, ACC 등)간 인터페이스 구성

5. 상용 H/W 및 S/W와의 호환성 고려 및 유지보수성 확보

제24조(과업의 주요내용)

1. 시스템 구축 부문

가. ATFMS 운영개념 및 운영방안 정립

나. ATFMS 구축방안

다. 공역관리시스템 구축 방안

라. 협력적 의사결정(CDM)체계 구축 방안

마. 항행안전시설 종합상황시스템 구축 방안

바. 외부 인터페이스 및 네트워크 시스템 연계방안

사. 재난 대비 방안

아. 설계도서 및 제안요청서 작성

2. 지원․연구부문

가. 항공교통관제 수용량 산정․관리 방안

나. ATFMS 해외 운영사례 조사

다. ATFMS 홍보방안 시행

라. 항공안전종합통제센터 운영 및 유지관리(주체․인력․예산 등) 방안

마. 가칭 “항공안전종합통제센터” 명칭 재검토

제25조(과업의 세부내용)

가. 시스템 구축 부문

1) ATFMS 운영개념 및 운영방안 제시

향후 원활한 ATFMS를 운영하기 위해 전반적인 마스터플랜 차원의 운영개념을 정립해서 운영방안을 제시

가) 항공안전종합통제시스템의 역할

나) 공항별 슬롯 운영 및 접근관제구역, 인천 ACC 섹터별 수용량 산정 및 관리방안

다) 위험 기상에 따른 항공교통 흐름의 예측방법 제시

라) 제1, 2ATC 시스템 장애에 대한 항공교통 흐름 예측 방법 제시

마) ATFMS 상황별 최적의 협력 흐름관리 방안 제시

바) ATFMS 단계별 업무 흐름도 제시

※ 단계별 예시) Ground Delay, Departure interval, Flight Route Change, Airspace Delay 등

사) ATFMS 운영 후 분석을 위한 피드백 방안 제시

아) 최소 1일전 항공교통 상황을 예측할 수 있는 방안

자) 관계기관 간 체결할 합의서(안) 제시

2) ATFMS 구축방안 상세설계

가) 제1, 2 ATC 및 공항․APP 시스템과의 상호 연동 운영 방안

나) 국내 공항의 예상 출발허가시간(EDCT) 발부 방안 및 범위

다) SSR 코드 할당 및 관리 필요성 검토

※ 필요시 SSR 코드 할당 및 관리 방안 제시

라) 지역흐름관리기구(FMU) 설치대상․구성방안

마) 종합통제상황실 및 장비실 내부 배치계획 방안

바) 종합통제상황실 내 대형 화면전시기 현시자료 및 설치방안

사) 공항별 Slot 관리․운영체계 방안 및 통합 운영기관 검토

아) ATFM 시스템 선정 방안

자) ATFM 시스템 S/W 소스코드 확보방안

차) 인접국(중국․일본)간의 항공교통 흐름관리 방안

카) ATFMS 교육훈련시스템(시뮬레이션) 구성․운영방안

타) ATFM 시스템 오류분석을 위한 감시․제어시스템 구성방안

파) GPS 시각 동기 구성방안

하) 교통량 및 흐름관리 통계자료 관리 방안

거) 실시간(공항 및 항공로별) 기상정보제공을 위한 기상지원시스템과의 연계방안

3) 공역관리시스템 구축방안 상세설계

가) 공역관리 운영개념 및 운영방안 제시

나) 공역관리시스템 배치도 및 구성 ․ 연계방안

다) ATC 원격단말기 세부 기능(방위, 거리, 자기 편차 등) 설계

라) 공역사용량 산출 및 공역경향 분석 통계자료 관리방안

마) 기상악화 시 공역사용 협조절차 제시

바) 공역사용 현황 현시

4) 협력적 의사결정(CDM)체계 구축방안 상세설계

가) 협력적 의사결정(CDM) 단말기 현시기능 및 구성방안

나) 외부 기관에 제공되는 비행자료단말기(제1, 2ATC용 FDT), AFTN 단말기 등과 통합 가능 여부 검토

다) CDM 구축대상 제시 및 효율적인 CDM 구성 배치

라) CDM 운영 시 각 관련기관과의 인터페이스 구축방안

마) 해킹 등에 대비한 외부 시스템과의 보안시스템 운영 및 적용 방안

바) 인천공항, 김포공항, 제주공항, 김해공항 등 구축예정인 국내공항 A-CDM과의 연계방안

5) 항행안전시설 종합상황시스템 구축방안 상세설계

가) 전국 항행안전시설 운영현황 현시 방안

나) 종합상황시스템 배치 및 구성방안

다) 해외 주요공항 운영현황(NOTAM 제한사항 등) 현시 방안

6) 외부 인터페이스 및 네트워크 시스템 연계방안 상세설계

가) 외부 각 지역흐름관리기구(FMU)와의 인터페이스 구축방안

나) CDM 운영 시 네트워크(내․외부) 구성방안

다) 국․내외 지형지도, 레이더․비행계획자료 및 각종 항공관련 시스템(CCTV, FOIS, e-AIM, ASDE, 항공기 스케줄 등)과 연계․전시

라) 기타 주요 인터페이스 및 네트워크 구성 등

7) 재난 대비 방안 제시

가) 재난관련 규정 검토

나) 재난 대책 설치 및 적용방안 검토

8) 설계도서 및 제안요청서 상세 작성

가) 설계도서(도면, 시방서, 산출내역서, 수량산출서 등) 상세 작성

나) 제안요청서 상세 작성

나. 지원․연구 부문

1) 항공교통관제 수용량 산정․관리방안 상세설계

가) ACC 전체/섹터별 및 주요 관제기관(공항, APP 등)의 객관적인 관제 수용량 산정을 위해 TAAM, RAMS, AirTOp 등의 평가 Tool을 활용하여 제시

나) 수용량 산정 시 운항 제한요소(활주로 폐쇄, 항행시설 고장, 위험기상, 군 훈련 공역 사용 가능여부, 인접국의 제한사항 발부 등) 발생 등을 고려하여 최적의 수용량이 제공되도록 ATFM 시스템과의 연계방안

2) ATFMS 해외 운영사례 조사

가) 시스템 설계 시 벤치마킹하기 위해 해외 운영사례 조사

나) 해외 운영사례 보고서 제출

3) ATFMS 홍보 방안

가) 업무 홍보용 프리젠테이션 및 동영상 등 제작

나) 홍보 세미나 개최

4) 항공안전종합통제센터 운영 및 유지관리(주체․인력․예산 등) 방안

※ 용역 착수 후 3개월 이내 최적의 방안을 도출하여 제출

5) 가칭 “항공안전종합통제센터” 명칭 재검토

(가칭) “항공안전 종합통제센터”를 보다 친숙하고 익숙한 용어로 불릴 수 있도록 항공 관계 종사자에게 명칭 공모 및 확정

제26조(과업의 실시)

1. 본 과업은 관련 법령 및 규정에 위배가 없어야 한다.

2. 국제법규는 ICAO 협약 부속서를 적용하고, 부속서에 내용이 없는 경우에는 “갑”과 협의하여 미연방항공청(FAA) 등의 규정을 검토 후 적용하여야 한다.

3. 본 과업은 “기본설계 등에 관한 세부시행기준(국토교통부 고시 제2013-93호, 2013.4.15)”에 따라 설계하여야 한다.

4. 설계도서 작성기준은 국토해양부 고시(제2012-553호, 2012.8.22)를 따라야 한다.

5. 설계의 책임 및 손해배상에 관하여는 다음과 같이 적용한다.

가. “을”이 계약서에서 정한 납품기한을 위반하였을 경우 기술용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 따라 조치한다.

나. “을”은 용역기간 또는 용역 후라도 설계용역(설계변경 포함)과 관련된 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 물량누락 등)에 따른 모든 책임을 져야 한다. 또한 해당 하자가 해소되었다는 것을 “갑”이 확인할 때까지 무상으로 하자를 치유하여야 한다.

Ⅲ. 설계도서 작성 및 성과품 납품

Ⅲ. 설계도서 작성 및 성과품 납품

제27조(설계도의 작성)

1. 설계도는 KS 표준규격과「건설기술 개발 및 관리 등에 관한 운영 규정(국토교통부 훈령)」에 따라 작성 한다.

2. 설계도는 누락된 부분이 없어야 하고 현장 기술자들이 쉽게 이해 및 시공할 수 있도록 상세히 작성하여야 한다.

3. 설계도는 매 페이지 마다 Key Map을 넣어야 한다.

4. 설계도는 한글과 아라비아 숫자로 표기하되 이해하기 어려운 것은 부분 확대하여 영어와 특수기호 등으로 표기할 수 있다.

5. 설계도는 목록, 명칭, 도면번호, 공사 명, 축척, 설계관련자 성명과 서명(설계자, 심사자, 승인자) 및 설계 업체 명을 포함 작성하여야 한다.

6. 축소도면은 A3 규격으로 작성하여야 한다.

7. 축소도면은 원도 대비 축소비율을 유지하도록 하고, 모든 글자와 숫자 등을 알아 볼 수 있도록 작성하여야 한다.

8. 시공도면은 시공업체가 작성할 수 있도록 공사비에 비용을 계상하여야 한다.

제28조(설계도서의 작성)

1. 설계도서는 가능한 한 전산처리를 원칙으로 하고, 관련자료 및 산출근거 등은 부록으로 작성․제출하여야 한다.

2. 모든 수량 단위는 법정계량 단위인 M.K.S.로 한다.

3. 설계도서(예산내역서, 일위대가표, 단가산출서, 수량산출서 등)의 규격은 A4 양면 경인쇄로 작성하여야 한다. 제본은 가로로 상철 한다.

4. 설계도서는 각 권마다 목차 및 페이지를 표기하여야 한다.

5. 예산내역서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 회계예규의 ’원가계산에 의한 예정가격작성준칙’에 따른다.

6. 일위대가 및 단가산출서는 2013년도 정부공인 표준품셈, 조달청 실적 공사비 등을 비교하여 산출하고, 물가는 사단법인 한국물가협회가 발행한 ‘物價資料’를 적용하되 물가자료에 없는 것은 견적가격을 비교․적용하여야 한다.

7. 원가계산이 필요한 경우에는 (사)한국원가관리협회를 통하여 실시하고, 해당 원가계산서를 별도 제출하여야 한다.

8. 예산내역서의 공종별 단가는 반드시 일위대가표 및 단가 산출서에 따라 작성하여야 한다. 일위대가 번호는 예산내역서의 비고란에 표시하여야 한다.

9. 단가 산출서에는 적용한 물가자료가 발행연도, 명칭, 페이지 등을 알 수 있도록 복사하여 첨부되어야 한다.

10. 수량산출서는 관련 적산규정에 적합하게 산출하되 적용공식 및 수치 등을 누구든지 알아보기 쉽도록 공종별로 빠짐없이 작성하여야 한다.

11. 수량산출서는 과업지시서에 명시되지 않았을 경우 “갑”과 협의하여 작성하여야 한다.

12. 수량산출서는 주요자재를 각 공종별로 산출하여 그 총괄 수량을 알 수 있도록 작성하여야 한다.

13. 건설기술관리법 제23조의2(설계도서의 작성 등) 및 같은 법 시행규칙 제14조의2(설계도서의 작성)에서 제14조의4(시공 상세도면의 작성)까지의 규정에 따른 공사시방서를 작성하여야 한다.

14. 공사시방서는 국토교통부 산하 한국건설기술연구원에서 발간한「공사시방서 작성요령(건기연 97-046)」에 따라 작성하여야 한다.

제29조(보고서 작성)

1. 착수보고서, 수시, 주간 및 월간공정보고서는 “갑”과 협의한 양식에 따라 작성하여야 한다.

2. 중간보고서, 요약보고서, 종합보고서는 과업내용 순서에 따라 작성하되 목차를 “갑”과 협의한 후에 작성하여야 한다.

3. 종합보고서에는 주요계획, 방침결정의 근거, 관계기관 협의자료 및 행정행위에 필요한 양식과 합의서 등을 작성․첨부하여야 한다.

4. 종합보고서에는 과업수행 현황, 사업 공정계획, 연차별 공사비 투자계획, 유지관리계획, 참여기술자 명단 등을 수록하여야 한다.

제30조(성과품 납품)

1. “을”은 준공일 40일전까지 일체의 성과품을 “갑”에게 제출 및 검토 받은 후 인쇄 및 제본하여 준공일 이내에 납품하여야 한다.

2. 일체의 성과품은 해당 목록에서 누락된 것이 없어야 하며, 목록에 없는 것을 “갑”이 요구하여 작성한 것을 포함하여 납품하여야 한다.

제31조(제출 서류)

1. “을”은 착수계에 다음의 구비서류(원본 및 사본)를 제출하여야 한다.

가. 용역수행 조직표(연락처 기재)

나. 책임기술자 선임계

다. 용역 참여기술자 현황(분야별 책임기술자, 업무내용, 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서

라. 과업수행계획서

1) 착수일로부터 7일 이내에 “갑”에게 제출 승인을 받아야 한다.

2) 과업수행계획서는 적용할 기준, 관련 법령, 공동수급체 현황(각 분야별 업무범위 및 책임), 설계품질 보증계획 및 목표예산을 고려 설계운용계획 및 설계용역 예정공정표를 포함한다.

3) 과업수행계획서는 산출내역서, 하도급 예정현황, 인력, 장비투입계획, 보안각서(참여기술자 전원), 기타 발주기관의 요구사항이 포함되어야 한다.

4) 과업수행계획서가 수록된 CD 제출

제33조 설계도서 납품목록

구분	설계도서	규격	수량	단위	비 고
1	종합보고서	A4	10	부
2	요약보고서	A4	10	부
3	제안요청서	A4	10	부	국문5, 영문5
4	관제연구보고서	A4	10	부
5	설계도면	A3	10	부
6	설계서	A4	10	부	(시방서, 설계예산서, 수량산출서, 산출내역서, 일위대가표 등
7	용역자료 사진	-	1	식	CD-ROM
8	발주기관 요구 성과품	A4	1	부

Ⅳ. 예정 공정표

Ⅳ. 예정공정표

구 분	추 진 일 정																									비고
	1월			2월			3월			4월			5월			6월				7월			8월
1. 착수 및 기초 자료 조사 ․ 수집
2. 기초자료 검토 및 보완사항 제시 ※ 전차용역 및 각종보고서 등
3. 해외사례 조사 계획수립 및 상세설계를 위한 관계기관 협의
4. 해외사례 조사 및 중간보고회 개최 - 해외사례 조사 - 중간보고회 개최
5. 상세설계
6. 각종 보고서(안) 작성 및 제출 - 최종보고서(안) - 제안요청서(안) - 요약보고서(안) - 관제연구보고서(안)
7. 각종 보고서(안) 수정 ․ 보완
6. 설계도서(안) 제출 및 최종보고회
7. 설계도서 보완 및 준공

[붙임 1] 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 항공안전종합통제시스템 구축 실시설계용역

2. 계약  일자 : 2014.   .   .

3. 착수  일자 : 2014.   .   .

4. 준공예정일 : 2014.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로써 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 수요기관에 귀속됨을 알고 별도로 수요기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2014년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

항공교통센터장 귀하

[붙임 2] 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 : 항공안전종합통제시스템 구축 실시설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2014.   .   .

4. 착수  일자 : 2014.   .   .

5. 준공예정일 : 2014.   .   .

-  아    래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 자격증 또는 경력증명서 사본 1부

2014.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

항공교통센터장 귀하

[붙임 3] 하도급계획서

하도급계획서

1. 용  역  명 : 항공안전종합통제시스템 구축 실시설계 용역

2. 하도급 내용

가. 하도급분야 :

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급 하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 따라 본 하도급계획서를 제출합니다.

붙임  하도급계획 자기검토서

2014.   .   .

제 안 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

항공교통센터장 귀하

하도급계획 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일
수 급 인				연락처
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서				이상 없음
사업자등록증			별첨			제출
하도급 수행에 필요한 자격요건
책임기술자 기술자격 및 경력증명서
참여기술자 기술자격 및 경력증명서
하도급 금액 및 비율
하도급 사유

〔붙임 4〕준공(기성) 검사원

준공(기성) 검사원

1. 용역명 : 항공안전종합통제시스템 구축 실시설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2014.   .   .

4. 착수일자 : 2014.   .   .

5. 준공예정일 : 2014.   .   .

붙임 : 납품설계도서 목록  1부

위 건에 대해 실시설계가 완성되어 준공(기성)검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2014년   월   일

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

항공교통센터장 귀하

[붙임 5] 주간공정보고

주간공정보고

1. 용 역 명 : 항공안전종합통제시스템 구축 실시설계용역

2. 용역개요

가. 현장위치 :

나. 용역기간 : 2014년  월  일 ～ 2014년  월  일

다. 계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주 진행사항(201 . . .)		금주 예정사항(201 . . .)		비고
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 상세하게 작성
공정률 (계획/실적)	금주	누계	금주	누계
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

항공교통센터장 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고

(  )월간공정보고

1. 용 역 명 : 항공안전종합통제시스템 구축 실시설계용역

2. 용역개요

가. 현장위치 :

나. 용역기간 : 2014년  월  일 ～ 2014년  월  일

다. 계약금액 : ○○○원

3. 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2014. . . ~ 2014. . .)						비고
1주
2주
3주
4주
5주
익월	- 공정 지연 시 지연의 구체적 원인 표기
공정률 (계획/실적)	전월	누계	당월	누계	익월 (계획)	누계 (계획)
	/	/	/	/	/	/

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

항공교통센터장 귀하

〔붙임 7〕 국외여비 정산서

국외여비 정산서

대 표 자	소 속										직위									성 명
출장목적 및 기간 등	출장목적										출장기간					출장국가				통화 명			원화 환율(1$ : ￦)
※ 정액여비 및 운임 지급내역	성명			직 급 (여비등급)					합계 금액				일비				식비				숙박비 할인정액				운임
				( )					USD
									￦
				( )					USD
									￦
				( )					USD
									￦
	합 계								USD
									￦
숙박비 실비정산 (총괄)	결제금액(현지에서 결제한 금액)																								정산금액
	성명						소속							개인카드						현금
	합계(￦)
숙박비 결제내역	일자				숙박업소명							결제방법			숙박비 결제금액
															현지통화					달러환산액				원화환산액
항공운임	여행일자											성명						직급						지급액 합계 (￦)
	출발					도착
국외출장 증빙자료를 첨부하여 제출합니다. 첨 부 : 증빙자료 1부 년 월 일 대 표 자 성 명 (인)

〔붙임 8〕용어의 정의

구분	약 어	영문 원어	국 문	비고
A	AirTOp	Air Traffic Optimization(software)	-
	APP	Approach	접근관제소
	ASBU	Aviation System Blok Upgrades	항공시스템 블록 업그레이드
	ATC	Air Traffic Center	항공교통센터
	ATFM	Air Traffic Flow Management	항공교통흐름관리
	ATFMS	Air Traffic Flow Management System	항공안전종합통제시스템
C	CDM	Collaborative Decision Making	협력적 의사결정
	A-CDM	Airport-Collaborative Decision Making	공항 협력적 의사결정
E	E-AIM	Electronic-Aeronautical Information Management	전자적 항공정보관리
	EDCT	Expected Departure Clearance Time	예상출발허가시간
F	FMU	Flow Management Unit	지역흐름관리기구
	FOIS	Flight Operation Information System	비행정보시스템
R	RAMS	Reorganized ATC Mathematical Simulator	-
S	SSR	Secondary Surveillance Radar	2차 감시레이더
T	TAAM	Total Airport and Airspace Model	-