2014년 사업발주계획

2014. 4.

국방전산정보원

목       차

1. 2014년 사무용 전산장비 도입	1

2. 국방정보자원관리체계 성능개선 사업	2

3. 국방자료교환체계 성능개선 사업	3

4. 국방통계시스템 고도화 사업	4

5. 암호장비 관리체계 구축사업	5

6. ’14년 국방부 노후 네트워크 장비교체	6

7. 국방정보체계 연동통합서버 구축 개념연구	7

8. 국방동원정보체계 4단계 구축 사업	8

1. 사업명 : ’14년 사무용 전산장비 도입

(담당자 : 신정훈,  02)748-0863)

1. 사업개요

내용연수가 만료된 노후 사무용 전산장비를 교체하고, 인가대비 부족장비를 확보하기 위한 사업임.

2. 사업예산 : 1,293,600,000원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2014년 6월 ~ 10월 / 5개월

일 정	주 요 내 용
2013년 6월	- 사업계획 수립 및 과업내용서 작성
2013년 7월 ~ 8월	- 사전규격공개 및 입찰공고
2013년 8월 ~ 10월	- 계약 및 사업수행(장비 납품 / 설치)
2013년 10월 ~	- 최종검수, 무상정비지원(검수 후 1년)

4. 사업내용

◦ 사업 수행기간 : 계약일로부터 50일이내

◦ 사업범위 : PC 1,280대, 노트북 27대, 모니터 706대, 프린터 104대

5. 기타

계약방법 : 일반경쟁(적격심사제)

2. 사업명 : 국방정보자원관리체계 성능개선 사업

(담당자 : 김진수,  748-0935)

1. 사업개요

정보화자원에 대한 회계처리 기능을 보완하여 자산관리의 신뢰성을 강화하고 사용자 중심의 현황/통계 자료 제공으로 정보화 정책업무의 의사결정을 지원하기 위한 성능개선 사업

2. 사업예산 : 400,000,000원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2014년 6월 ~ 2014년 12월 / 7개월

일 정	주 요 내 용
‘14년 4월	- 사전규격공개 / 사업공고 / 발주 및 계약업무 추진
‘14년 5월	- 제안서 평가, 가격개찰, 기술협상, 계약
‘14년 6월~12월	- 사업수행계획서 승인 - 응용S/W개발
‘14년 12월	- 최종검수, 무상정비지원(검수 후 1년)

4. 사업내용

구 분	내 용
응용체계 개발	회계처리, 예산/사업 관리 기능, 각종 검색/통계 화면, 사용자 편의 및 관리자 기능 보강 등
연동	재정정보체계, 시설정보체계, 국방통합데이터센터 자산관리체계 등
DB 재분류	응용체계명 전수조사, 제조사/모델명 정리
DB 자료 변환	정보화자산/이력 통합, 회계처리 자료 통합

※HW, 상용SW 도입 없음

5. 기타

- 일반경쟁(협상에 의한 계약)

3. 사업명 : 국방자료교환체계 성능개선 사업

(담당자 : 한 정,  748-0952)

1. 사업개요

국방부/각 군에서 운영 중인 국방자료교환체계의 보안 취약요소 개선과 관리기능 강화를 통해 사용자에게 보다 안정적인 서비스 제공 및 효율적 체계 운영을 도모하기 위한 성능개선 사업

2. 사업예산 : 533,000,000원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2014년 7월 ~ 2014년 10월 / 4개월

일 정	주 요 내 용
‘14년 5월	- 사전규격공개 / 사업공고 / 발주 및 계약업무 추진
‘14년 6월	- 제안서 평가, 가격개찰, 기술협상, 계약
‘14년 7월~10월	- 사업수행계획서 승인 - 응용S/W개발
‘14년 11월	- 최종검수, 무상정비지원(검수 후 1년)

4. 사업내용

◦ 응용체계 개발 및 바이러스 백신 이중화

- 파일 확장자 통제, 외부 유입자료 승인절차, 발송관리, 프로그램

변경 관리, 관리자 기능 강화

- 조직관리스템, 바이러스방역체계 연동

- 바이러스 백신 이중화 모든 파일에 대해 바이러스 및 악성코드 검사

기능 강화

5. 기타

- 일반경쟁(협상에 의한 계약)

4. 사업명 : 국방통계시스템 고도화 사업

(담당자 : 최연옥,  748-0984)

1. 사업개요

통계정보수집의 지능화, 통계정보의 가치향상, 통계의 효율적 제공으로 과학적 의사결정 지원과 부처 간 정보공유, 대국민 소통을 지원하기 위한 고도화 사업임

※ 국방3.0 추진세부과제 선정 : ‘13. 6

2. 사업예산 : 5,680,000,000원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2014년 8월 ~ 2015년 7월 / 12개월

일 정	주 요 내 용
‘14년 4월	- 사업계획서 승인의뢰 / 일상감사, 보안성 검토 의뢰 - 발주 / 사전규격공개 / 사업공고
‘14년 5월~6월	- 제안서 가격접수, 제안서 평가, 가격개찰, 기술협상, 계약업무 추진
‘14년 7월~’15년 7월	- 응용S/W개발 - 시스템 구축 / 보안측정 및 보완
‘15년 7월	- 최종검수, 무상정비지원(검수 후 1년)

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음.

4. 사업내용

◦ 응용체계 개발 및 기반체계 구축 사업

- 응용체계 : 국방망서비스 시스템 등 핵심기능위주 관리시스템 구축

- 연동체계 : 국방통합재정정보체계, 의료정보체계 등 핵심체계 연동

- 기반체계 : HW 및 상용SW 도입

-  -

5. 기타

- 일반경쟁(협상에 의한 계약)

5. 사업명 : 암호장비 관리체계 구축사업

(담당자 : 원범희,  748-0837)

1. 사업개요

국방 암호장비의 운용 및 관리업무를 전산화하여, 효율성·보안성을 강화하기 위한 관리체계 구축사업

2. 사업예산 : 1,500,000,000원(부가세 포함)

3. 사업기간 : `14. 7월 ~ `15. 7월 (12개월)

일 정	주 요 내 용
‘14. 4 ~ 5월	- 사전규격공개 / 사업공고 / 발주 및 계약업무 추진
‘14. 6월	- 제안서 평가, 가격개찰, 기술협상, 계약
‘14년 7월 ~ `15. 7월	- 사업수행계획서 승인 - 응용S/W개발
‘15. 7월	- 최종검수, 무상정비지원(검수 후 1년)

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음.

4. 사업내용

구 분	내 용
응용체계 개발	국방망을 기반으로 전군의 암호장비 관리기관(000개소)에서 암호장비(기타정보 포함) 운용관리, 연구개발, 정비 등을 총괄 전산화 관리하는 기능
하드웨어 도입	WEB/WAS/DB(주서버/보조서버), 스토리지, L4 스위치 등
상용SW	WEB, WAS, DB, 리포팅툴, 보안SW 등

5. 기타

- 일반경쟁(협상에 의한 계약)

6. 사업명 : ’14년 국방부 노후 네트워크 장비교체

(담당자 : 차우영,  748-0982)

1. 사업개요

임차기간 만료 및 사용년수 경과로 노후화된 네트워크 장비 및 회선 교체 및 구축을 통한 안정적 정보체계 서비스 지원 및 새로운 국방정보체계구축을 위한 네트워크 환경 조성

2. 사업예산 : 3,740,000,000원(부가세 포함, 리스사업)

3. 사업기간 : 2014년 6월 ~ 10월 / 4개월

일 정	주 요 내 용
‘14년 4월	- 사전규격공개 / 사업공고 / 발주 및 계약업무 추진
‘14년 5월	- 제안서 가격접수, 제안서 평가, 가격개찰, 계약
‘14년 6월~10월	- 착수보고 및 사업수행계획서 검토/승인, 장비 조달 및 운용환경 분석
‘14년 10월 초	- 구축 및 테스트/평가
‘14년 10월	- 검수 및 사업 종결, 무상정비지원(검수 후 1년)

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음.

4. 사업내용

1) 청사 내(국전원 외 3개소) 노후 네트워크 장비 교체(백본 스위치        /워크그룹 스위치/라우터 등) 및 주요구간 이중화

2) 홍보원, 현충원 노후장비 장비 교체 및 주요구간 이중화

3) 주요 청사 간 네트워크 선로 재구성 및 경로변경

4) 국전원 및 기무부대 건물 LAN 재구축

5. 기타

- 일반경쟁(협상에 의한 계약)

7. 사업명 : 국방정보체계 연동통합서버 구축 개념연구

(담당자 : 주유나,  748-0985)

1. 사업개요

국방자원관리 각 체계별로 상이한 연동방식을 표준화하고 종합적으로 관리하기 위한 연동통합서버 구축 개념연구 사업

2. 사업예산 : 340,000,000원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2014년 5월 ~ 10월 / 6개월

일 정	주 요 내 용
2014년 1월 ~ 2월	- 사업계획 수립 및 과업내용서 작성
2014년 3월 ~ 4월	- 사전규격공개 및 입찰공고
2014년 5월 ~ 10월	- 계약 및 사업수행
2014년 11월 ~	- 최종검수, 무상 유지보수 지원(검수 후 1년)

4. 사업내용

1) 국방 정보통신환경에 최적화된 국방정보체계 연동통합서버 구축 방안, 소요예산, 일정 등 정보화전략계획(ISP) 수립

2) 향후 전장관리정보체계를 포함한 국방분야 全 정보체계의 통합 연동을 고려한, 자원관리정보체계 연동 데이터/기술 표준 정립

3) 現 운영 중인 정보체계에 대한 영항 및 비용을 최소화한 연동서버 통합 방안 마련

5. 기타

계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

8. 사업명 : 국방동원정보체계 4단계 구축 사업

(담당자 : 장현실,  748-0948)

1. 사업개요

국방동원정보체계 4단계는 전시동원능력을 분석하는 “동원능력분석” 분야와 기존체계의 표준화 및 기능을 개선하는 “성능개선” 분야로 구성된다. “동원능력분석” 분야는 기 구축된 국동체 예비군관리(1단계), 인원동원(2단계), 물자동원(3단계) 자료를 바탕으로 전장상황을 반영한 전시동원 집행능력을 분석하기 위한 확률형 모의분석 방법을 사용하는 모델로 개발하며, “성능개선” 분야는 국방동원정보체계 1·2·3단계의 데이터 표준화, 전자정부 표준프레임워크 적용 등 상호운용성 보장 및 사용자 편의성 향상을 위해 기능개선을 하는 사업임

2. 사업예산 : 83.3억 (부가세 포함, 장기계속계약)

- `14년 : 9.5억원

- `15년/`16년(편성요구 예산) : 37.94억원/35.89억원

3. 사업기간 : 2014년 6월 ~ 2016년 12월 / 31개월

일 정	주 요 내 용
‘14년 4월	- 사전규격공개 / 사업공고 / 발주 및 계약업무 추진
‘14년 5월	- 제안서 평가, 가격개찰, 기술협상, 계약
‘14년 6월~12월	- 사업수행계획서 승인 - 분석
‘15년 1월~5월	- 설계
‘15년 6월~`16년 5월	- 구현
‘16년 6월~7월	- 개발시험평가
‘16년 8월	- 자료이관
‘16년 9월~10월	- 운용시험평가
‘16년 11월	- 사용자교육
‘16년 12월	- 검수 및 사업종결

4. 사업내용

구 분	내 용
응용체계 개발	- 동원능력체계 구축 - 국방동원정보체계 성능개선 및 통합 구축
체계통합	별도 사업으로 추진되는 서버 교체 사업과의 정상적인 협조를 위한 체계통합
하자보수	검수 완료 후 1년

※HW, 상용SW 도입 없음

5. 기타

- 일반경쟁(협상에 의한 계약)