2014. 03.

남악신도시 오룡지구 택지개발사업 연약지반침하안정관리용역

과 업 지 시 서

목   차

Ⅰ. 설계설명서                                          Ⅲ. 특별시방서

1. 용역명 …………………………………… 1                1. 적용범의 ………………………………………… 13

2. 위치   …………………………………… 1                2. 침하안정관리용역의 목적  …………………… 13

3. 면적   …………………………………… 1                3. 과업의 수행순서  ……………………………… 13

4. 과업의 목적  …………………………… 1                4. 위치 및 수준측량 ……………………………… 14

5. 용역기간 ………………………………… 1                5. 지반조사 ………………………………………… 15

6. 과업내용 ………………………………… 2                6. 계측기 제원 및 설치기준  …………………… 18

Ⅱ. 일반시방서                                             7. 계측DATA 분석 프로그램  …………………… 29

1. 과업의 수행범위………………………… 5                8. 계측기 배치기준  ……………………………… 30

2. 과업의 착수   ……………………………5                9. 계측기 측정기준  ……………………………… 32

3. 과업수행자의 구성 및 자격기준  …… 6               10. 관리지역별 계측빈도  ………………………… 35

4. 과업수행자의 근무지침  ……………… 7               11. 시험 ……………………………………………… 36

5. 과업수행자의 책임과 의무   ………… 7               12. 계측데이타 분석기준  ………………………… 36

6. 보안사항  ………………………………  8               13. 성토관리 ………………………………………… 40

7. 보고사항  ………………………………  8

8. 설계변경  ……………………………… 11

9. 기타사항  ……………………………… 11

Ⅰ. 설  계  설  명  서

Ⅰ. 설계설명서

1. 용역명: 남악신도시 오룡지구 택지개발사업 연약지반 침하안정관리용역(1단계)

2. 위치 : 전라남도 무안군 일로읍일원

3. 사업지구면적	: 726,739㎡ (219,839평)

∙ 연약지반 처리면적 (원형지 공급제외)	: 510,651㎡ (154,471평)

4. 과업의 목적

가. 침하계측, 분석 및 FEED BACK으로 계획된 지반처리 공사기간 내에 설계상 허용잔류침하량 이내로 침하가 완료 될  수 있도록 관리하고 공사 준공후 조성된 단지의 잔류침하량에 대한 안전성 확보

나. 단지내 단계성토시 지반파괴 방지 및 지하매설물 터파기시 활동파괴 방지 등을 위한 안정관리

다. 계측결과에 따른 자료의 분석 및 결과에 따른 대응방안 제공

5. 용역기간 : 본 용역기간은 착수일로부터 :	45개월로 한다.
단, 현장여건에 따라 조정이 필요한 경우 발주기관의 승인을 득하여 용역기간을 연장할 수 있다.

6. 과업내용

가. 지반조사     * 지반조사용역은 별도 발주여부에 따라 과업수행내용이 달라질 수 있다.

1) 시추조사(NX 규격)
시추조사	점토	모래	사력	고결
32공	600m	112m	9.6m	5.2m

2) 자연시료 채취	: 120회

3) 표준관입시험	: 484회

4) 실내시험
구분	함수량 시험		비중 시험	액성 한계	소성 한계	입도 시험	표준 압밀시험	삼축압축 시험(UU)
수량	152회		76회	76회	76회	76회	60회	120회

나. 계측기 설치
구 분	지표면침하판		층별침하계		간극수압계		지하수위계		경사계	보호드럼
수량	70개소		16개소		16개소		16개소		7개소	157개

다. 계측기 측정 및 분석
구분	지표면침하판	층별침하계		간극수압계		지하수위계		경사계
수량	14,931회	3,393회		3,393회		3,393회		1,481회

라. 재해석 수량
구분	침하관리	안정관리
수량	16회	7회

마. 보고서 작성
1) 개량완료단계 보고서 1회
2) 기타착수보고서, 월간보고서, 수시보고서 등

Ⅱ. 일 반 시 방 서

Ⅱ. 일반시방서

1. 과업의 수행범위

가. 본 침하안정관리용역의 적정수행을 위한 단지조성공사의 연약지반처리 설계 및 공정계획의 적정성 검토

나. 단지조성공사 공정계획을 고려한 본 과업의 세부시행계획 작성

다. 지반조사 및 자연시료채취

라. 계측기 설치 및 측정

마. 지반조사, 실내시험, 침하안정 계측결과의 분석 및 Feed Back 으로 조성공사 설계기준에 부합되는 침하 및 안정의 관리

바. 계측결과 지반의 이상 징후 발생 시 원인분석 및 대책수립

사. 공사비절감, 공법개선 및 공사의 질적향상을 위하여 필요한 사항 검토

아. 설계변경요인 발생 시 설계변경 검토 및 대안제시

자. 지반조사, 시험, 계측 및 분석에 관한 제반 보고서 작성

차. 기타 본 과업의 효율적 수행을 위하여 감독원이 지시하는 사항

2. 과업의 착수

가. 수급인은 계약체결 후 3일 이내에 과업을 착수하여야 하며 착수보고서를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

나. 착수보고서에는 과업수행 인력 및 구성, 과업수행 인력의 상주 및 비상주여부, 지반조사, 계측 및 분석계획, 공정계획 등 본 과업 전반에 세부추진 계획서가 포함되어야 한다.

3. 과업수행자의 구성 및 자격기준

가. 본 용역의 과업수행 인력은 다음과 같이 구성되어야 한다.

사업책임기술자

참여기술자

계측책임기술자

분석 및 전산처리 책임기술자

참여기술자

나. 사업책임기술자는 연약지반에 관한 조사, 시험, 설계 및 침하안정관리 분야에 고도의 지식과 경험을 가진 자 이어야 한다.

다. 분석 및 전산처리 책임기술자는 연약지반의 조사, 시험, 설계, 침하안정관리 분야 및 전산처리 분야에 풍부한 지식과 경험을 가진 자 이어야 한다.

라. 계측책임기술자는 측량 및 경사계, 간극수압계등 전자식 계측장비의 사용 경험이 풍부한 자 이어야 한다.

4. 과업수행자의 근무지침

가. 사업책임기술자는 과업을 총괄하여 수행하여야 한다.

나. 모든 참여기술자는 자격기준에 명시된 기술자가 업무를 수행하여야 하며 분석 및 전산처리 분야 2인(분야책임자 포함)은 현장상주를 원칙으로 한다.  * 사업책임기술자는 필요시 발주청 요구에 의하여 상주할 수 있다.

다. 현장상주 인력 중 계측공정율이 70%이상이 되거나 월평균 기성율이 2%이하로 3개월 이상 지속시에는 발주청과 협의하여 ‘나’의 현장상주인원을 1인으로 조정 할 수 있다.

5. 과업수행자의 책임과 의무

가. 과업수행자는 본 용역 과업지시서, 세부추진계획서, 조성공사 시방서 및 설계도서, 용역 및 조성공사의 예정공정, 발주자의 지시사항등 제반사항을 숙지하여 제 시방 및 규정대로 계측 및 분석이 시행되는가를 철저히 확인하여 엄격한 품질관리가 이루어지도록 하여야 한다.

나. 착수보고시 제출된 과업수행 인력을 교체하고자 할 때에는 동등 또는 그 이상의 능력을 가진 자를 발주자의 사전 승인을 얻어 배치하여야하며, 선․후임을 15일이상 중복근무토록 하여 과업수행에 지장이 없도록 하여야 한다. 단, 이때 소요되는 비용은 수급자가 부담한다.

다. 과업수행자의 기술적인 검토소홀, 불성실한 과업수행, 고의, 중대한 과실등으로 인하여 그 제시내용이 잘못되어 공사시행 중 또는 공사준공 후 중대한 차질을 초래하였을 때는 수급자가 그 책임을 진다. 이때 발주자는 과업수행자 및 수급사에 대한 제재를 관계부처에 요청할 수 있다.

라. 과업수행자는 감독원이 요구하는 기술적 사항에 대하여 검토 후 의견을 제시하고, 지시된 사항의 이행현황 및 실적을 보고하여야 한다.

마. 과업수행자는 조성공사 시행상 발생하는 문제점, 분쟁등의 해결에 협조하여야 한다.

6. 보안사항

가. 계약사의 대표자는 별첨양식에 의거 보안각서를 제출하고 과업수행자에 대한 보안각서는 계약 대표자의 책임하에 징구 제출하여야 한다.

나. 월간 및 최종보고서등 용역 성과물은 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 필요할 경우 비밀 또는 대외비로 분류 관리하여야 한다.

다. 모든 성과품은 수급인이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부로 유출할 수 없다.

라. 수급인은 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

7. 보고사항

가. 과업수행자가 발주자에게 제출하여야 할 보고 사항

1) 착수보고서 : 4부

- 과업수행 인원의 배치계획

- 근무일정계획

- 침하안정관리용역 세부추진 계획서

- 계측 DATA 분석9

- 기타

2) 업무일지

- 기술자문 및 분석내용

- 과업수행내용

- 공사상 문제점 및 대책검토내용

3) 월간보고서 : 3부

- 개별작업의 설명을 포함한 공정현황

- 월간 업무의 주요사항

- 매월 측정자료를 검토 분석한 내용

- 성토에 따른 문제점 발생 여부 및 검토사항

- 각단위관리지역별 확인단계 및 완료단계의 재해석 결과

4) 수시보고서 : 3부

- 발주자로부터 별도 보고의 지시가 있는 경우

- 천재지변등의 사고로 용역이 중단된 경우

- 용역이 예정된 용역일정에 비해 현저히 부진되고 있는 경우

- 실시공정에 이상현상이 발생할 경우

- 지반거동에 이상현상이 발생할 경우

- 기타 과업수행상 중요하다고 인정되는 경우

5) 지반개량완료단계보고서, 최종 종합보고서 : 1회 각 10부

- 월간 및 연도 말 보고 내용

- 현장조사 및 실내시험 결과 분석

- 연약지반처리 추진내용 분석

- 계측결과 분석내용 및 재해석 결과

- 향후 예상되는 문제점(건축하중 및 교통하중에 의한 추가침하등)

- 설계 및 계측의 문제점 도출

- 기타 필요한 사항

7) 사진첩 : 2부

8) 수정안된 계측 DATA와 수정된 계측DATA가 수록된 CD 및 출력된 자료 : 2부

나. 과업수행자가 기록, 유지해야 할 사항

1) 업무일지

2) 공정표

3) 지시부

4) 각종 지반조사 및 시험성과에 대한 내용

5) 시공계획의 검토내용

6) 공법검토등 기술적 검토사항

7) 계측에 따른 자문 의견서

8) 기타 계측과 관련된 서류 및 기록

다. 보고절차

1) 제반 보고서류는 반드시 감독원을 경유하여야 한다.

2) 공사 감리자 및 시공자와 협의사항은 반드시 감독원을 경유하여야 한다.

8. 설계변경

가. 과업량, 과업내용, 과업수행기간 등 과업범위가 변경될 때

나. 지반조사 및 계측기 매설 보링 결과에 따른 보링수량 및 계측자재 수량 정산

다. 계측물량 및 분석물량의 증감에 따른 정산이 필요할 때

라. 물가변동에 따른 계약금액 조정이 필요할 때

마. 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때

9. 기타사항

가. 수급자는 감독원과 협의하여 현장사무실을 설치하여야 한다.

나. 현장사무실의 상황판, 안내시설물, 유도간판 등은 감독원 지시에 따라 설치하여야 하며 이에 소요된 비용은 정산처리 한다.

다. 본 과업지시 이외의 사항은 관계 법령 및 발주청의 관련규정과 정부제정 각종 시방서에 의거 감독원과 협의하여 수행하여야 한다.

라. 침하안정관리 분석내용에 대하여 관련학회, 대학 등의 자문을 받야야 하며 최종 성과물에 그 결과를 포함시켜야 한다.

Ⅲ. 특별시방서

Ⅲ. 특별시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 오룡신도시 택지개발사업 연약지반 침하안정관리용역 (1단계)의 연약지반조사, 계측기기 설치 및 계측, 시험, 분석 등에 관한 제반조건 및 특별한 사항만을 규정하여 제시방서보다 우선한다.

나. 본 용역과 관련된 발주청의 제 규정은 특별시방서의 일부로 간주한다.

다. 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정 관련시방서를 적용한다.

2. 침하안정관리 목적

가. 침하계측, 분석의 FEED BACK으로 계획된 지반처리 기간내에 허용침하량 및 압밀도를 검토하여 연약지반처리의 적정시공이 되도록 관리하고 공사 준공후 조성된 단지의 잔류침하량에 대한 안전성 확보

나. 단지조성을 위한 단계성토시의 지반파괴 방지를 위한 안정관리

다. 기타 연약지반 상 단지조성에 따른 제반 문제점에 대한 대책수립

3. 과업의 수행 순서

가. 매설단계 지반조사공 위치 및 수준측량

나. 매설단계 지반조사(보오링 조사)

다. 표토제거(조성공사)

라. PET MAT 및 SAND MAT 드레인재 타입(조성공사)

마. 계측기 매설지점과 확인단계 및 완료단계 지반조사(Piezo-Cone조사) 지점에 대한 위치 및 수준측량

바. 계측기 매설 및 초기치 측정

사. 재하성토(조성공사)

아. 계측 및 분석

자. 계측 및 분석결과에 의한 시공에 환류(FEED BACK)

차. 계측 및 분석

카. 완료단계 지반조사 및 재해석에 의한 시공에 환류(FEED BACK)

4. 위치 및 수준측량

가. 매설단계 지반조사공에 대한 위치 및 수준측량 도면상에 표기된 보링 조사공의 좌표를 산출하여 현장에 측설하고, 조사지점에 대한 수준측량을 실시한다.

나. 침하판 설치시기 및 초기치 측정 드레인재 타입에 의한 지반 침하량을 측정하기 위하여 침하판은 드레인재 타입 직후에 매설하여야 하며 매설직후 초기치를 측정하여야 한다.

다. 재하성토후 확인단계 및 완료단계의 지반조사를 위하여 조사위치를 먼저 결정한 후, 그 위치에 대한 측량을 실시하고 좌표로서 산출하여 이 측량 성과를 이용 확인단계 및 완료단계 지반조사를 기 계획된 동일 위치에서 실시할 수 있도록 조치하여야 한다.

5. 지반조사   * 지반조사용역은 별도 발주여부에 따라 과업수행내용이 달라질 수 있다.

가. 지반조사의 목적

1) 매설단계 지반조사

가) 조사설계 보링, 매설단계 지반조사 보링조사 및 실내시험 결과를 종합분석하여 침하안정관리 지역별로 토층을 구분하고 각 토층에 대한 토질정수를 결정하여 계측분석의 기초자료로 활용

나) 계측기 설치심도 및 수량 결정

다) 연약지반처리 설계의 적정성 검토

라) 원지반의 강도특성을 분석하여 1회 포설두께와 성토속도 및 한계성토고 결정

2) 개량완료단계 지반조사

가) 지역별로 성토가 완료된 후 계측분석 결과 잔류침하량이 허용잔류침하량에 도달할 때 시행한다.

나) 실내시험 결과에 의한 압밀 완료 여부의 확인과 침하 계측분석 결과와의 비교 검토

다) 압밀 완료후 지반의 강도 증가 확인

라) 재해석에 의한 최종 장래침하량 및 잔류침하량 추정, 추가성토 필요 유무, 재하성토 제거시기, 지하매설물 착수 시기, 토지이용 가능시기등의 결정

나. 지반조사의 단계 및 내용

다. 지반조사의 시기

1) 매설단계 지반조사 : 표토제거 및 지반처리 전에 원지반에서 실시한다.

2) 개량완료단계 지반조사 : 완료단계 성토 후에 실시한다.

3) 지반조사 시기의 변경이 필요한 경우에는 감독원의 사전승인을 받아 조사시기를  변경할 수 있다.

라. 지반조사의 수량

항 목	단 위	단 계 별 수 량		계	비 고
		사전조사	완료단계
시추조사	공	16	16	32
표준관입시험	회	210	274	484
불교란시료채취	개	60	60	120

1) 지반조사의 위치 : 지반조사는 배치된 드레인재간의 무게중심(도심)에서 실시하여야 한다.

2) 보오링조사

가) 지반조사 장비

시추장비는 케이싱이 1°이내의 수직도를 유지할 수 있는 장비를 사용하여야 하며, 장비의 성능에 대하여 감독원의 사전승인을 받은후 조사를 실시하여야 한다.

나) 보링기준

① 보링 굴진 시 받드시 전 심도에 케이싱을 설치하여야 하며 보링 규격은 NX이상이어야 한다.

② 케이싱은 감독원의 지시가 있을 때까지 빼어서는 아니되며, 지하수위는 72시간 경과 후 측정하여야 한다.

다) 표준관입시험

① 표준관입시험은 KS F 2318에 규정한 시험방법에 따라 실시하고, 자연시료 채취시에는 시료의 교란을 방지하기 위하여 자연시료 채취심도 상부 3m에서는 표준관입시험을 실시하지 않고 자연시료 채취가 끝난후 바로 하부에서 표준관입시험을 실시한다.

② 케이싱은 시료를 채취할 깊이보다 더 깊이 압입하여서는 아니되며, 채취된 흐트러진 시료는 함수비의 변화가 없도록 전량 밀폐된 용기속에 보관하여 함수량을 측정할 수 있도록 한다.

③ 도급자는 채취된 흐트러진 시료를 투명한 용기에 보관하고 보오링번호, 일자, 채취심도, 타격회수(예비타 포함) 및 토질분류등을 기재한다.

라) 자연시료채취

① 자연시료의 채취용 Thin Wall Tube의 규격은 D=75mm 이상이다.

② 자연시료 채취빈도는 설계서에서 구분된 지층수 만큼이며 채취심도는 중간지점이다. 채취빈도 및 심도의 변경은 감독원의 승인을 받아야 한다.

③ 시료채취전에는 반드시 보링구멍내를 맑은 물로 세척하여 Slime이 없도록 하여야 한다.

④ 자연시료 채취시 보링 케이싱이 시료 채취심도보다 깊게 설치되어서는 안된다.

⑤ 자연시료 채취방법 및 Thin Wall Tube는 KS F 2317 규정에 따른다.

⑥ 자연시료 채취기는 Piston Sampler를 사용하여야 하며 변경시는 감독원의 승인을 받아야 한다.

⑦ 자연시료는 채취 즉시 양끝을 밀봉하여 함수량의 변화를 방지하여야 하며, 양측을 파라핀으로 밀봉할 때를 제외 하고는 수평을 유지하도록 취급, 보관하여야 한다.

⑧ 채취된 시료는 동결 또는 태양의 직사광선을 받지 않는 시원한 곳에 보관하여야 하며, 자연시료의 운반 및 보관시에는 충격과 진동을 주어서는 안되며, 채취와 운반 및 보관중에 시료가 교란되었다고 감독원이 판단할 경우에는 수급자 부담으로 즉시 다시 자연시료를 채취하여야 한다.

마. 현장 및 실내시험

1) 성토체의 단위중량을 파악하기 위하여 조성공사에서 시험을 실시하고 있으나 미흡한 경우 감독원의 승인을 받아 본 용역에서 추가시험 또는 일괄 시행하여, 침하관리를 위한 분석 시 정확한 성토체의 단위중량을 이용하여야 한다.

2) 성토체의 단위중량을 시험하는 방법으로서 모래치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법보다 물 치환법등 정밀한 시험법이 있는 경우 감독원의 승인을 받아 시행하여야 한다.

3) 수급자는 물리적특성, 역학적특성 시험성과를 세밀히 분석 그 결과를 감독원에게 제출하고 단계별 지반조사 보고서에 수록하여야 한다.

6. 계측기기 제원 및 설치기준

가. 계측기별 제원

1) 간극수압계

가) 조건 : 1공(보링 내경 100mm이상)에 1개의 Sensor 설치

나) 측정방식 : 진동현식(Vibrating Wire Type)

다) Sensor

① 정밀도 : ±0.1% F.S이상

② 최소측정단위(resolution) : 0.025% F.S이하

③ 측정범위 : 0～50ton/㎡

④ Maximum Over Load : 150% 이상

⑤ 재질 : Stainless Steel 또는 그 이상의 내부식성, 내충격성, 내화학성이 있는 것.

⑥ 측정온도범위 : -20℃～60℃

⑦ Filter Pore Size : 50㎛～60㎛

⑧ Themometer : 측정범위 -20℃～60℃

⑨ 측정값에 대하여 온도 및 기압 보정은 분석 S/W에서 자동적으로 이루어져야 한다.

라) Cable

① 재질 : PE피복, 20AWG, 방습, 전자파차폐기능이 있고 저항이 작은 것으로서 Sensor와 동일회사 제품이어야 함.

마) Cable 보호관

① 재질 및 규격 : 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관 50mm

바) 지시계

① 정밀도 : Sensor의 정밀도와 동등 또는 그 이상

② 최소측정단위 : Sensor의 Resolution과 동등 또는 그 이상

③ 기억용량 : Ram의 용량은 1회분(설치된 간극수압계에 대한 측정)의 측정치를 저장할 수 있는 것

④ 사용시간 : 12시간이상

사) 소모자재 및 기타 일체

2) 지하수위계

가) 조건 : Sand Mat층에 설치, Open Type

나) Stand Pipe

① 재질 : PVC관(VG1)

② 규격 : 외경 26 ㎜, 두께 3.0㎜

③ 길이 : 1개당 길이 3m

다) 피에조미터 팁 : 30㎝의 길이로 Sand Mat 층에 설치하여 지하수위를 측정할 수 있는 것으로 Casagrande식

라) 수위감지기

① 구성 : 센서와 연결된 감지기, 1㎝단위로 표시된 Cable, Readout이 있는 릴

② 측정범위 : 20m이상

③ 정밀도 : 1㎝

마) 소보자재 및 기타 일체

3) 층별침하계(M.C TYPE)

가) 조건 : 지지층(기반암)까지 천공(보링 내경 126㎜이상)하여 DATUM MAGNETIC, PLATE MAGNETIC, SPIDER MAGNETIC을 설치

나) 지시계 및 Probe

① 측정정도 : ±1m/m

② 측정범위 : 50m이상

③ 작동온도 : -30℃～60℃

④ Probe 재질 : Stainless Steel

다) Casing

① 재질 : ABS 또는 그 이상의 재질을 가진 것.

② 구경 : O.D 69.9㎜±0.5㎜, I.D 58.9㎜±0.5㎜

③ 1개당 길이 : 3.0m

④ 커플링 : Telescopic으로 양쪽으로 확장된 상태에서 Nylon Shear Pin으로 고정되어 있어야 하며 1개당 길이는 100㎝±3㎝

⑤ Telescoping Section 신축범위 : 150m/m이상 1개당

라) Spider Magnetic

① O.D ANCHOR FULLY EXTENDED : 22㎝ 이상

② 양날개 방식(상,하 각3개), 날개 끝이 90。이상 꺾여 원지반에 고착이 잘되는 형태일 것

마) Datum Magnetic, End Cap, Top Cap 등 소모자재 및 기타 일체

4) 지표면침하판

가) 침하판

① 재질 : 강철판

② 규격 : 900×900×9㎜

③ 나)항의 침하봉하단을 침하판에 용접으로 견고하게 접합하여야 한다.

나) 침하봉

① 재질 및 규격 : 강관, 외경 25.4㎜, 두께 3㎜

② 길이 : 1본당 1m (연결시 접합은 커플링을 사용하여 나사접합)

다) 보호관

① 재질 및 규격 :  강관, 내경 101.6㎜, 두께 3㎜

② 길이 : 1본당 1m (연결시 접합은 커플링을 사용하여 나사접합)

라) 지지대(도면참조)

① 재질 및 구경 : 강봉, 직경 15㎜

② 다)항의 보호관(1.0m)의 하단이 지면에서 0.5m의 간격을 유지하도록 지지대를 보호관 외벽에 견고하게 용접하여야 한다.

마) 소모자재 및 기타 일체 (지표면침하판 상세도 참조)

5) 경사계

가) 조건 : 지지층(기반암)까지 천공(보링 내경 100㎜이상) 후 설치

나) 측정방식 : 가속감지식(Biaxial)

다) Sensor

① 정밀도 : ±1m/m PER 500㎜ of Casing Length

② 측정범위 : ±35°이상

③ 재질 : 내염분, 내화학성등의 내구성이 있는 Stainless 또는 그 이상의 내구성을 가진 것

④ 측정온도범위 : -20 ～ +50℃

라) Casing

① 구경 : O.D 69.9 ±0.5m/m, I.D 58.9 ±0.5m/m

② 재질 : ABS 또는 그 이상의 재질을 가진 것

③ 길이 : 1.5m

④ 커플링 : TELESCOPIC 으로서 한쪽만 Nylon Shear Pin으로 확장된 상태에서 고정되어 있어야 하며 1개당 길이는 52㎝±3㎝

⑤ 커플링 신축범위 : 150m/m 이상 / 1개당

마) 지시계

① 정밀도 : 0.1%F.S 이상

② 최소측정단위 : 0.1%F.S 이하

③ 기억용량 : 1회분 (설치된 모든 경사계에 대하여 0.5m 마다 측정)을 저장 할 수 있는 것

④ 사용시간 : 12시간 이상

⑤ Cable재질 : PE피복, 20AWG, 방습, 전자파 차폐기능이 있고 저항이 작은것으로서 SENSOR 제작회사와 한 회사의 제품이어야 한다.

⑥ Cable 길이 : 50m 이상

바) END CAP, TOP CAP 및 소모자재와 기타 일체

6) 계측기 보호휀스(재질 및 규격) : PE 드럼

다. 계측기 도입시 사전승인

계측에 관련된 각종 센서 및 제반기기는 필히 사전에 자재 공급원 승인을 받은후에 구입, 설치 하여야 한다. 계측기기를 구성하는 센서, Cable, 층별침하계(M.C TYPE)와 경사계의 Casing 및 Magnetic제품은 모두 시방서에 부합되어야 하며 각 센서는 온도 및 기압보정식이 포함된 교정성적서를 제출하여야 한다.

라. 계측기 설치기준

1) 공통기준

가) 보링

① 계측기 설치를 위한 보링은 케이싱을 전부 설치하여야 하며, 보링내경은 전부126㎜ 이상이어야 한다.

② 보링장비는 지반에 평행하게 설치할 수 있도록 X, Y, Z축으로 1°이내로 조정가능 하여야 하고 보링작업 동안 수직도를 1°이내로 유지하여야 하며, DK50, DK150, C-8 장비 이상의 성능을 가지고 있어야 한다. 또한 장비의 성능에 대하여 감독원의 사전 승인을 받아야 한다.

③ 계측기 매설위치는 천공전에 측량을 실시하고 도면에 지반조사 위치, 드레인재 타입 위치 및 계측기 설치 위치등의 측량성과와 위치를 표시하여 감독원의 승인을 받아 후 계측기를 설치하여야 하며, 이 도면과 측량 성과는 훼손되지 않도록 보관, 관리하여야 한다.

나) Sand Filter의 품질

① 피에조미터와 지하수위계 설치 공내에 충전하는 모래는 NO.200번체 통과량이 5%이하인 모래를 사용 하여야 한다.

② 피에조미터 팁을 싸는 주머니의 AOS 규격은 090 < 80㎛이며 PP재질이어야 한다.

③ 피에조미터 팁을 싸는 주머니에 넣는 모래의 입경은 75㎛이상이어야 한다.

다) Grouting

① 모래가 필터재로서 공내에 투입되는 계측기기의 상단 1m는 Grouting시 벤토나이트 시멘트 믹스가 모래로 혼입되는 것을 방지하기 위해 벤토나이트 펠렛으로 충전하여야 하며 bentonite-cement의 혼합비율은 주변지반의 강도와 변형계수가 일치 되도록 감독원 입회하에 시험배합하여 결정하고 시험배합 결과를 제출하여야 한다.

② 그라우팅 장비는 그라우팅 배출압력이 25kg/㎠이상인 장비를 사용하여야 하며 장비의 성능에 대하여 감독원의 사전 확인을 받아야 한다.

라) 설계 시 토질조사  결과에 따라 계측기 설치심도 및 수량을 검토하여 감독원에게 보고하여야 하며, 감독원의 지시에 따라 계측기 반입과 설치를 하여야 한다. 또한 이에 따라 변경된 수량은 정산처리 한다.

마) 각종 Cable 및 보호관은 지반침하 및 전단변형에 의하여 단선되지 않도록 Snaking 및 여유를 주고 설치 하여야 한다. 도급자는 실 사용량을 증명하기 위해 자재구매계약서, 실제사용 내역등 근거서류를 발주처에 제출하여야 한다.

바) 각 계측기의 위치, 심도 및 종류별로 일련번호를 부여하고 명찰을 각 계측기에 부착하여 관리하여야 한다.

2) 계측기별 설치기준

가) 간극수압계(V.W Type)

① 회전수세식으로 보링 내경 100㎜ 이상의 설치공을 계획심도까지 케이싱을 설치하면서 천공하여야 한다

② 피에조미터 팁을 설치할 부근의 공벽 케이싱을 제거한 후 Slime이 없도록 맑은 물로 깨끗이 세척하여야 하며, 이때 Air를 이용하여 청소하여서는 아니된다.

③ 모래를 피에조미터 팁 아래에 20㎝ 이상 채운다.

④ 줄자에 원형추를 연결하여 천공심도를 확인한다.

⑤ 간극수압계 팁은 24시간동안 물로 포화시켜 팁에 있는 기포를 제거하고 계측기 카다로그에서 제시하는 방법으로 초기값을 읽어 기록한다.

⑥ 간극수압계는 보링공에 2개의 소자를 설치하며 포화된 간극수압계를 시험공에 20 ～ 30㎝까지 투입하여 Sensor의 이상유무 및 소정의 정밀도를 확인하여 감독원의 승인을 받은후 물속에 잠겨있는 간극수압계 팁을 물에 잠겨있는 채로 현장에 운반하여 포화된 Package나 Filter bag에 넣어 계측지점에 간극수압계를 설치한다.

⑦ 피에조미터 상부 20㎝이상 모래를 채우고 다져 투수층을 형성한다.

⑧ 케이싱을 1m 정도 제거한 후 모래층으로 벤토나이트 그라우팅액의 침투를 방지하기 위하여 모래층 상부에 두께 100㎝의 벤토나이트 펠렛을 투입하고 다져서 벤토나이트 Plug를 만든다.

⑨ 케이싱을 제거하면서 그라우팅 호스를 이용, 시멘트 벤토나이트 그라우팅을 하여 지표면(Sand Mat층)까지 불투수층을 형성한다. 이때 벤토나이트와 시멘트의 혼합비율은 주변지반의 강도와 변형계수가 일치 되도록 시험배합을 하여 결정한다. 그라우팅이 양생된후 침하된 부위에 다시 그라우팅재를 채운다.

⑩ 그라우팅을 실시하면서 과다한 수평변위를 대비하여 지중과 지표면에 Cable에 Snaking을 주어 지반변형에 따른 Cable 단선을 방지하고, 또한 보호관을 공내에 1m이상 삽입하여 Cable 단선을 방지하여야 한다.

⑪ 그라우팅액의 양생이 완료되고 벤토나이트 펠렛을 투입한지 최소 72시간 이상 경과한후 초기치를 측정한다.

⑫ 성토에 따른 Cable 보호를 위하여 지표면에서 Cable Snaking을 한후 보호관(파상형 경질 PE관 D=50m/m)에 넣어 성토작업에 따른 Cable의 손상을 방지하여야 한다.

나) 층별침하계(M.C TYPE)

① 보링 내경 126㎜이상의 설치공 케이싱을 설치하면서 지지층(자갈층 1.0m)까지 굴진한다.

② 천공후 맑은 물로 깨끗하게 세척하여 Slime을 완전하게 제거하여야 한다.

③ 줄자에 원형추를 연결하여 천공심도를 확인한다.

④ 최초에 삽입되는 Casing 단부는 End Cap을 써서 이물질이 Casing내부에 들어가지 않도록 한다.

⑤ 현장 사무실에서 미리 수평변형량과 수직변형량을 고려하여 Casing과 커플링을 조합하여 천공심도에 맞게 배열한다. 또한 몇 개의Casing과 커플링을 Rivetic하고 고무테이프로 감아 Sealing 처리한후 각각에 대한 번호를 연결된 Casing에 기입하고 Magnetic 감지소자를 설치계획심도에 부착하여 감독원의 검측을 받은 후, 현장에 반입하여 연결된 Casing을 번호별로 설치공내에 조립된 케이싱을 그라우팅 호스와 함께 천공홀안에 삽입하여야 하며 연결부에 Riveting과 Sealing 처리를 하면서 지지층(기반암)까지 Casing을 설치를 한다.

⑥ Datum Magnet는 하단에, Spider Magnet는 계측지점마다 부착시켜 신축성있는 줄을 이용하여 상부까지 연결하고, Spider Magnetic은 그 지층에서 발생할 수 있는 침하량을 감안하여 Telescopic 커플링 바로 하부에 Spider Magnetic이 설치될 수 있도록 하여야 한다.

⑦ 층별침하계 센서 설치 지점까지 케이싱을 제거하고 Spider Magnet에 연결된 줄을 제거시켜 천공홀에 정착되도록 한다.

⑧ 간극수압계 ⑨와 동일

⑨ 위의⑦,⑧항의 작업을 반복하여 각 지점에 Magnetic 설치 및 그라우팅을 완료한 후 호스를 제거한다.

⑩ 초기치를 측정한다.

다) 지표면침하판

① 현장에 반입된 지표면 침하판은 설치하기 전에 반드시 시방서 사양과 동일여부를 공사감독원의 검사를 받은후 설치 하여야 한다

② 침하판은 반드시 성토 착수전에 설치하여야 하며 원지반에 소량의 모래 또는 양질의 토사를 원지반에 부설하여 침하판이 수평으로 설치되도록 평평하게 골라주어야 한다.

③ 외부보호관과 내부보호관이 접촉될시에는 파이프의 마찰로 인하여 측정오차가 발생할 수 있므로 외부보호관 설치는 내부 침하봉이 정확히 중앙에 오도록 설치하여야 하며, 성토가 계획고까지 도달될때 까지 파이프를 동일한 방법으로 계속 연결하여 설치한다.

④ 침하봉과 침하판은 최종성토 완료시 성토상단 위로 적당히 노출시켜 측정에 지장을 주지 않도록 해야 한다.

⑤ 침하판이 설치되면 바로 수준측량에 의해 침하전의 초기치를 측정한후 공사감독원의 확인을 받아 초기치로 사용하여야 한다.

⑥ 성토시 침하판이 이동하거나 경사지는 것을 방지하기 위해 침하판 주위에 직경 2m, 높이 1m정도로 조심스럽게 인력으로 성토를 먼저하여 측정시 오차가 발생하지 않도록 해야 한다.

⑦ 침하판마다 일련번호를 표시한 명찰을 반드시 부착하여 침하판 일련번호 혼동으로 인한 측정오류을 방지하여야 한다.

라) 지하수위계

① Sand Mat 포설후 지표면침하판 보호관에 붙여서 철사 또는 청테이프 등으로 고정시켜 설치하며, Sand Mat 층에 설치한다.

② 피에조미터 팁에 모래주머니를 고정시키고 Casing을 커플링으로 연결한다.

③ 팁이 Pet Mat에 닿도록 삽입시키고 팁 상단에 두께 50㎝이상의 모래를 부설하고, 설치가 완료되면 Casing 상부에 보호마개를 설치한다.

④ 설치되는 Casing의 상단에 Casing의 총 연결길이를 기입하여 설치하고 관리하여야 한다.

마) 경사계

① 안정관리 목적에 부합되는 측정방향(A, B)을 설정하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

② 회전수세식으로 보링 내경 126㎜이상의 설치공을 지지층(기반암 1.0m)까지 천공한다.

③ 줄자에 원형추를 연결하여 천공심도를 확인한다.

④ 천공후 맑은 물로 깨끗하게 세척하여 Slime을 제거하여야 한다.

⑤ 최초에 삽입되는 Casing 단부는 End Cap을 써서 이물질이 Casing 내부에 들어가지 않도록 한다.

⑥ 최초에 사무실에서 미리 수평변형량과 수직변형량을 고려하여 Casing과 커플링을 조합하여 천공심도에 맞게 배열한다. 또한 몇개의 Casing과 커플링을 Riveting하고 고무테이프로 감아 Sealing처리한 후 각각에 대하여 번호를 연결된 Casing에 기입하고 감독원의 검측을 받은후, 현장에 반입하여 연결된 Casing을 번호별로 설치공내에 Casing의 홈의 방향을 맞추어 삽입하여야 하며 연결부에 Riveting과 Sealing처리를 하면서 지지층(기반암)까지 Casing을 설치한다.

⑦ 되메움 재료는 측정관 주위의 토질에 따라 채택한다.

- 점토층 : 시멘트 BENTONITE용액

- 실트 섞인 모래층 : 모래

- 자갈층 : 모래

- 풍화암층 : 시멘트 그라우팅

⑧ 상단부에 마개를 씌우고 계측기 보호휀스를 설치하여 파손을 방지하여야 한다.

⑨ 그라우팅재가 양생된 후 침하된 부위에 다시 그라우팅재를 채운다.

⑩ 되메움 양생이 완료되면 측정공 주위에 상단면 0.4 × 0.4m, 하단면 1.0 × 1.0m, 깊이 0.3m로 터파기하고 보호용 콘크리트(레미콘 40-160-8) 타설후에 보호Box를 깊이 20㎝를 콘크리트 속에 삽입시킨후 양생시켜 계측용 PAD 및 보호Box를 설치한다.

⑪ 초기치를 측정한다.

바) 계측기 PE드럼

① 침하관리지역 및 안정관리지역에는 개소당 1개씩 설치한다.

마. 계측기 성능 유지 및 보호의무

가) 수급인은 본 시방서에 규정된 대로 계측기를 설치하여 계측기의 고장, 오동작등이 없도록 하여야 하며, 불량 계측기기 발생시는 수급인의 부담으로 지체없이 교체하여야 한다.

나) 수급인은 계측기기가 차량 및 장비로부터 보호되도록 계측기 주변에 계측기 보호휀스를 설치 유지관리하고 현장작업자들에게 주지시키야 하며 계측기 주변 성토시는 담당기술자가 현장에 위치하여 인력 부설하도록 감독하여야 한다. 만약, 수급인의 부주의로 인한 계측기 손상이 발생 할 경우 수급인 부담으로 지체없이 복구하여야 한다.

7. 계측DATA 분석 프로그램

가. 수급인은 과업착수시까지 다음 기준에 부합되는 연약지반 침하 및 안정 계측 DATA분석용 S/W를 필히 구비 하여야 하며 착수 보고시 본 과업에 사용할 S/W와 상세한 사용설명서를 제출하여야 한다.

나. 분석 S/W는 계측 DATA를 다음 방법 이상으로 분석할 수 있는 기능이 있어야 한다.

1) 침하관리 DATA 분석

① 쌍곡선법

② Asaoka법

③ Hoshino법

④ Terzaghi 압밀이론에 의한 실측침하곡선 fitting 방법(Simulation방법) : 무처리구간 사용

⑤ Hansbo 또는 Barron 압밀이론에 의한 실측침하곡선 fitting 방법(Simulation방법) : 수직 드레인 처리구간 사용

⑥ 과잉간극수압 소산에 따른 압밀도 산정

2) 안정관리 DATA분석

① Kurihara방법

② Tominaga-hashimoto방법

③ Matsuo-kawamura방법

다. 분석S/W는 실측자료와 상관도가 높아야 하며, 특히 침하관리 프로그램은 실측자료와 분석자료의 상관도가 0.95이상이어야 한다.

라. 분석S/W는 계측자료의 측정시기가 일치하지 않은 경우에는 Virtual Data Generation기능으로 분석할 수 있어야 한다.

마. 분석 S/W는 Raw Data에 대한 Format 변경없이 각각의 분석 프로그램들이 서로 연결되어 자동으로 분석되어져 반드시 Real Time 분석이 이루어져야 한다.

바. 분석S/W는 측정한 계측기 값에 대하여 필요한 보정 (온도, 기압, Tilting등)을 자동적으로 할 수 있어야 한다.

사. 착수 보고시 제출된 분석 S/W는 당공사 감독원이 분석 가능한 종류, 분석방법별 logic구성의 정확성등 본 시방서 기준과의 부합여부를 검토하고 기준의 실측 DATA를 이용, 분석을 실시하여 시방기준에 적합하다고 인정할 때에만 해당S/W를 본 과업에 사용할 수 있다. 만약 감독원의 검토결과 본 시방에 부적합한 경우 수급인은 시방기준에 맞도록 분석S/W를 즉시 보완하거나 교체하여야 한다.

8. 계측기 배치 기준

가. 개요

본 과업의 계측기는 다음기준에 의거 배치하였으며 매설단계 지반조사 결과 추정된 지하지반의 변동등으로 계측기 설치 지점의 변경이 필요한 경우 감독원의 사전승인을 받아 위치를 변경할 수 있다.

나. 침하안정 단위관리지역의 결정

1) 토지이용계획에 따른 동일 허용잔류침하량 기준과 지반처리 공법의 동일성, 유사성을 기준으로 구분

2) 단위관리 지역

가) 단지부 침하관리지역

① 공동주택용지 : 허용잔류침하량 10㎝

② 단독주택용지, 저층상업지역 : 허용잔류침하량 5㎝

③ 상업용지 청사 아카데미  : 허용잔류침하량 10㎝

④ 녹지 : 허용잔류침하량 30㎝

나) 도로 침하관리지역

① 도로(대로, 중로, 소로, 완충녹지) : 허용잔류침하량 10㎝

② 교량(구조물) 접속부 도로구간 : 허용잔류침하량 5㎝

다) 안정관리지역 : 연약지반상의 성토사면 발생지역

다. 계측기 설치 빈도

1) 지표 침하판 : 87m 간격

2) 대표단면(층별침하계, 간극수압계, 지하수위계) : 197m 간격

3) 안정관리지역 : 측방변위 발생예상지점

라. 계측기 설치 지점별 계측기 종류

1) 침하관리지점

가) 대표단면 지역

- 계측기 종류 : 간극수압계, 층별침하계, 지표면침하판, 지하수위계

나) 일반관리지역

- 계측기 종류 : 지표면 침하판

2) 안정관리지점

- 계측기 종류 : 경사계, 간극수압계, 층별침하계, 지하수위계, 지표면 침하판

마. 계측기 설치지점 선정기준

1) 지반처리공법의 구분되는 경계지역은 피하였음

2) 공사 시공중, 시공후에도 장기계측을 위하여 계측기 보존이 용이한 지점

3) 단위관리지역별 토질 특성을 대표할수 있는 지점으로 연약층 심도가 깊은곳, 침하량이 크게 예상되는 지점, 토질정수가 낮은지점등 가장 취약한 지점

4) 단독택지, 근린생활시설용지, 업무용지, 공동주택용지 등과 같이 건축공사가 도로 시설물 공사보다 늦은 지역은 도로부와 부지를 구분하여 설치

5) 도로부 침하관리지역의 계측기는 지하매설물 위치를 고려하여 장기계측이 용이한 지점에 설치

6) 연약지반 심도가 가장 깊은곳에 1개소 배치

7) 안정관리지역의 침하판은 성토사면의 상단에 설치

8) 기타 위치는 감독원과 협의 조정하여 설치

9. 계측기 측정기준

가. 공통지침

1) 모든 계측기의 초기치는 계측 즉시 정리하여 감독원에게 제출하여야 하며 감독원은 이를 확인하여야 한다.

2) 수준측량은 원칙적으로 Level측량기로 수행하여야 하며 현장여건상 부득이한 경우 광파기를 이용한 간접측량에 의한 수준측량을 실시할 수 있다, 또한 본 과업수행에 사용할 측량기는 나. 항에서 규정한 성능 이상의  측량기를 사용하여야 하며 기계의 성능에 대하여 감독원의 사전 승인을 받아야 한다.

3) 설치되는 모든 계측기의 센서, 침하판, 층별침하계 소자 설치심도 등의 초기치를 측정할 때마다 수준측량을 실시하여야 하며, 모든 계측치는 EL(elevation)으로 표기하여 관리하여야 한다.

4) 도급자는 모든 계측데이타를 기록으로 유지 관리하여야 한다.

5) 계측치는 감독원에게 제출하여야 하며 그 성과를 인정 받은 계측치에 대해서만 계측 결과를 인정하고 그 대가를 지불한다.

나. 지표면 침하판

1) 초기치 및 계측치를 측정하여 감독원에게 제출하여 확인을 받아야 한다.

2) LEVEL 측량

가) 수급인은 본 과업 착수 즉시 계측기 배치도면을 참고하여 본 사업지구 외곽의 고정지반에 최대 500m 이내의  간격으로 견고하게 부동의 TBM을 설치하고 사업지역 인근에 위치한 1등 수준점으로부터 1등 수준측량 기준에 맞도록 왕복 수준측량을 실시하여 TBM의 표고를 계산하여 본과업의 수준측량 기준점으로 사용하여야 한다.

나) 설치된 TBM을 기준으로 해당 TBM을 이용할 침하판 관리구역을 설정한다.

다) 측정은 TBM과 침하판에 연결된 로드상단 사이의 고저차를 수준측량한다.

라) 침하량은 초기 EL.과 측정 EL.의 차이를 침하량으로 한다.

마) 침하판에 대한 매회의 수준측량은 관리구역 단위로 실시하고 해당 TBM에 폐합시켜 측량의 정밀도를 검정한 후 오차를 보정하여야 하며 계측성과는 측량야장과 침하관리대장을 정리하여 확인을 받아야 한다.

바) 매회의 측정완료후 시간-침하량관계 그래프에 측정된 침하량을 기입하여 측정이상유무를 확인하여야 하며, 이상이 발견된 경우에는 즉시 재측정하여 부실측정이 되지않도록 해야한다.

사) LEVEL 측량기 제원

- 형식 : 레벨

- 1㎞ 왕복 측정 오차 : 1.0㎜이내

3) 광파기를 이용한 수준측량

가) 광파기의 제원

- Electronic Total Station Pype

- 망원경 : 30 배율

- 거리측정

- 측정범위 : 최대 2,700m

- 정도 : ±(2㎜ + 2ppm)

- 최소 측정단위 : 0.2㎜

- 측정시간 : 단회 2.5sec,  트래킹 : 0.6sec

- 기압 및 온도 자동 보정장치 장착(0.1ppm step)

- 각도 측정

- 최소 독취치 : 0.5˝

- 정도 : 1˝

4) 위성측량을 이용한 수준측량

가) 위성측량 제원

- 위성신호 :  GPS 72 Universal Channels

- 측정범위 : 1,000m

- 정밀도 : (3㎜ + 0.5ppm)

- 데이터 관리 : 무선통신 1Hz ∼20Hz, 블루투스 모뎀 이용

- 메모리 : SD/SDHC 카드(FAT16/32포맷)

- 충격  :  2m (Pole Drop)

- 방진 방수능 : IP67(IEC 60529:2001)

- 작동온도 : -40 ∼ +65°c

- 작동습도 : 100%

다. 간극수압계

1) 측정시 간극수압계 설치지역의 연약층 심도의 2배 반경 이내에서 성토중이거나 중장비가 있는 경우에는 측정을 실시하여서는 아니된다.

2) 초기치 및 계측치를 측정하여 감독원에게 제출하여 확인을 받아야 한다.

3) 계측치는 지하수위 변동에 따른 지하수위 보정을 하여야 한다.

4) 기압 보정을 위하여 기압계를 사무실내에 구비하여야 하며 간극수압계 계측 착수시와 종료시의 기압을 평균하여 사용한다. 또한 온도는 각 센서의 계측치를 이용한다.

5) 기압 및 온도 보정은 분석 S/W에서 자동적으로 이루어져야 한다.

6) 침하에 따른 간극수압계 센서의 매설심도(EL)변경을 층별침하계 소자의 계측결과를 토대로 계산하여 계측치를 보정하여야 한다.

라. 층별침하계(M.C TYPE)

1) 측정방법은 Datum Magnetic으로부터 Spider Magnetic, Plate Magnetic 순서로 상대적인 변위를 측정한다.

2) 측정단위는 ㎝단위로 하여야 한다.

3) 초기치 및 계측치를 측정하여 감독원에게 제출하여 확인을 받아야 한다.

마. 지하수위계

1) 재하성토전 원지반의 초기 지하수위는 Piezocone 조사결과 또는 매설단계 보링조사 공에서 측정한 지하수위를 사용한다.

2) 초기치 및 계측치를 측정하여 감독원에게 제출하여 확인을 받아야 한다.

3) 지표면 침하판의 침하봉의 Level과 지하수위계의 Casing 길이를 이용하여 측정치를 EL로 계산하여야 한다.

바. 경사계

1) 측정방향을 명찰에 표기하여 일정하게 유지하여야 하며 Casing 하부에서 상부방향으로 0.5m 마다 측정한다.

2) 초기치 및 계측치를 측정하여 감독원에게 제출하여 확인을 받아야 한다.

10. 관리지역별 계측빈도

가. 성토단계 및 방치기간별 계측기의 계측빈도는 다음과 같으며, 도급자는 감독원이 지정하는 시간과 빈도로 정확하게 계측을 실시하여 그 결과를 제출하여야한다.

나. 침하관리지역 및 안정관리지역 계측빈도

계 측 빈 도						비고
준비기간중	성토기간중	성토완료후
		1개월	2～3개월	4～5개월	6개월이후
2회/2일	1회/일	1회/3일	1회/주	1회/2주	1회/월	변경없음

※성토기간은 1, 2, 3단계 성토기간의 합계임.

다. 본 과업의 성토기간중 계측횟수는 성토기간 6개월 기준으로 하였으며, 성토공정이 기준보다 조기에 실시되거나 지연되어 성토기간이 장기간 진행되어 변경된 계측 수량은 정산처리한다.

11. 시험

가. 연약지반 관련 실내시험의 종목과 수량

구 분	표준관입시험시료	자연시료
		입도시험	함수비	액성	소성	압밀시험	삼축(UU)
1단계	32회	60회	120회	60회	60회	60회	120회

12. 계측 DATA 분석기준

가. 수급인의 책임과 의무

수급인은 연약지반 처리 및 재하성토에 따른 지반 거동을 계측 분석하여 시공에 환류(FEED BACK)하므로서 계획된 공기내에 가장 안정적이고 경제적으로 조성공사 설계기준에 부합되는 지반처리가 되도록 관리할 책임과 의무가 있으며 수급인의 고의 또는 업무 과실로 인하여 공사중 또는 준공후 연약지반 처리와 관련된 문제점이 발생할 경우 그에 상응하는 책임을 져야한다.

나. 지반조사 결과의 분석 및 활용

1) 수급인은 조사설계 토질조사 결과와 본 용역의 매설단계의 지반조사 결과를 종합하여 지하지반의 지층을 재구성하고 지층별 토질정수를 재산정하여야 한다. 이 때 연약 점성토층은 통계분석등의 방법으로 역학적 성질이 비슷한 수개의 층으로 구분되어야 한다.

2) 1)항에 의해 재분석된 지층 및 토질정수와 조성공사의 성토계획에 의거 모든 침하관리 지점에 대하여 예측 Time-Settlement 그래프를 작성하여 감독원에게 보고하여야 하며, 실측된 침하량을 같이 표시하여 압밀의 진행추이를 파악하여야 한다. 조성공사 성토계획 변경 또는 단계 성토별 분석 결과에 따라 성토계획이 변경될 경우에는 예측 Time-Settlement 그래프를 변경하여 관리하여야 한다.

다. 실측 침하량 분석 기준

1) 수급인은 다음 이상의 방법을 사용하여 각 단계 성토하중에 대한 장래 침하량(Sf) 및 압밀도를 산정하여야 한다.

① 쌍곡선법

② Asaoka법

③ Hoshino법

④ Terzaghi 압밀이론 및 Hansbo 또는 Barron 압밀이론에 의한 실측침하곡선 fitting 방법(Simulation방법)

⑤ 과잉간극수압 소산에 따른 압밀도 산정

⑥ 기타

2) 집중침하관리지점의 측정Data 분석 : 층별침하계는 침하소자별로 분석을 실시하여 각층의 최종침하량(Sf)을 분석한 후 각층의 Sf 와 Magnetic 및 지표면 침하판의 Sf, 간극수압 분포 등시선의 경시 변화를 종합적으로 비교 검토하여 가장 신뢰성 있는 분석 결과를 산출하여야 한다.

3) 침하판 관리지점의 측정 Data 분석은 인근 집중침하관리지점의 분석 결과를 토대로 분석을 실시하여 분석 결과의 신뢰도를 제고하여야 한다.

4) 성토에 의한 유효상재하중은 현장밀도시험 결과 및 지하수위를 고려하여 가장 합리적인 결과를 적용하여야 하며 지하수위 상승 시 성토하중의 변화를 필히 고려하여야 한다.

5) 위 항에 제시된 방법으로 신뢰도가 높은 결과가 도출되지 않으면 1차 압밀침하시 발생되는 2차 압밀침하량과 전단 변형량 및 탄성침하량 등을 감안 분석하여 신뢰도가 높은 결과를 도출하여야 한다.

6) 계측된 Data는 측정 즉시 나. 2)항의 그래프에 기입하여 지반거동을 항시 파악할 수 있도록 하여야 한다.

라. 간극수압 및 지하수위 측정 결과는 다음과 같이 기록 관리되어야 한다.

1) 간극수압 및 지하수위 측정 결과는 다음과 같이 기록 관리되어야 한다.

가) 간극수압계 소자별로 측정치를 기록 관리

나) 재하성토(△P), 총 수압(U), 지하수위(G.W.L), 과잉간극수압(△U), 압밀도-시간(t) 관계도

다) 재하성토(△P) - 과잉간극수압(△U) 관계도

라) 지반내 각층의 과잉간극수압 분포 등시선의 경시 변화도

2) 간극수압계 소자별 간극수압 측정 및 분석 결과는 층별침하계의 해당 소자의 계측치와 상호 비교하여 압밀도에 대한 분석을 실시하고 지반내 각층의 간극수압 등시선의 경시변화와 침하판 및 층별침하계 Plate Magnetic 소자의 계측치와 상호 비교 하여 가장 신뢰성 있는 결과를 산출하여야 한다.

3) Sand Mat 저항으로 지하수위가 성토체 내로 상승하여 압밀지연을 초래하거나, 침하의 진행에도 불구하고 간극수압이 계속 상승하는 등의 설계조건과 상이한 상황이 발생할 경우에는 즉시 원인을 분석하고 처리대책을 수립하여 감독원에게 보고

마. 분석 결과의 시공에 환류(FEED BACK)

1) 수급인은 지반조사 결과와 실측 Data를 기초로 하여 각 단위관리지역별 완료단계별로 시간계수, 압밀계수, 압축지수, 지반강도 변화등을 산출하여 성토 단계별 성토시기, 성토고, 성토속도 및 침하기간등을 조성공사 설계상 계획과 비교, 재해석을 실시하여 재하 성토계획의 변경, 방치기간의 변경등 대책을 수립하여 시공에 환류(FEED BACK)시켜야 한다.

2) 지반처리 및 재하성토후 예상한 압밀 촉진 효과가 얻어지는지 여부를 검토하고 실측결과가 그에 반하는 경우에는(예,[eqn: C_v] 〉[eqn: C_h] , 계측시 [eqn: C_c] 〉설계시[eqn: C_c]) 그 원인을 조사 분석하고 대책을 수립하여 감독원에게 보고하여야 한다.

바. 장기 침하측정 및 분석

1) 수급인은 Preload 제거 및 지하 매설물 공사 착수 후에도 가능한 많은 계측기가 보존될 수 있도록 조치하여야 한다.

2) 수급인은 지반공학 연구단체와 협력하여 Preload 제거 및 구조물공사 착수 후에도 시방서에 지시된 빈도로 계측 및 분석을 실시하여 1차 잔류침하량, 2차침하량을 산출하고 공사 준공 후 예상되는 2차침하량을 공사 준공 후 시기별로 예측하여 최종보고서에 수록하여야 하며, 이에 따른 설계변경이 가능하다

3) 연약지반의 심도가 급변하는 구역은 잔류침하량의 차이로 인한 부등침하량을 산출하고 건축물과 지하매설물에 미치는 영향을 분석하여 최종보고서에 수록하여야 한다.

사. 안정관리

1) 조사설계시 토질조사 결과와 매설단계 지반조사 결과를 종합 분석하여 한계성토고, 성토속도, 성토방법을 검토하여 감독원에게 보고하여야 한다.

2) 안정관리 지점은 성토중 및 성토 완료후 7일까지 기초지반의 변형량과 변형속도, 침하량과 침하속도를 상세하게 매일 계측 분석하여 안정된 상태에서 시공되도록 관리하여야 한다.

3) 안정분석은 아래 이상의 분석 방법으로 계측 즉시 검토 분석하여 성토의 안정여부를 판단하고 그 결과를 감독원에게 보고하여야 하며, 이상 징후 발견시에는 성토속도 조절, 성토 일시 중단, 성토 일부 제거 등 응급 대책을 수립하여 즉시 감독원에게 보고한 후 사후 대책을 수립하여 감독원에게 보고하여야 한다.

① Kurihara방법

② Tominaga - hashimoto방법

③ Matsuo - Kawamura방법

④ 기타

4) 제방, 지구계 도로부 등의 성토관리는 경사계가 설치된 지점을 중심으로 성토토록 하여 이상징후 발생 시 즉시 대처가 가능하도록 하여야 한다.

5) 경사계 설치 지침

- 지구경계에 인접하여 설치한다.

6) 조사설계 및 매설단계 지반조사를 종합 검토하여 압밀 진행 정도에 따른 지반강도 증진 여부를 확인하여 추가 성토고, 성토속도를 산정하여 감독원에게 보고하여야 한다.

13. 성토관리

가. 조성공사 성토계획의 검토 및 조정

1) 수급인은 계측관리 감독원, 조성공사 책임감리원, 시공사와 협의하여 계측지점의 계측결과가 해당 침하관리 구역을 대표할 수 있도록 성토계획을 검토, 협의 조정하여야 한다.

2) 계측기 주변 성토시 1일 성토가 연약 지층심도의 2배 반경 이상으로 이루어 지도록 하여 계측치가 계측기 관리 구역을 대표할 수 있도록 하여야 한다.

3) 1)항에 의해 수립된 성토계획을 종합하여 계측 및 분석 인력 배치, 계측기 소요수량 등 상세한 용역수행계획을 수립하여야 한다.

4) 공사장 내의 토공 운반로는 계측기기에 영향을 미치지 않는 위치를 미리 지정하여 깃발 등으로 표식을 설치하고 해당 운반로만을 이용토록 관리하여야 한다.

5) 계측기 보호를 위하여 계측기 부분은 양질의 토사로 높이 0.5～1.0m를 인력으로 먼저 성토한후 계측기 보호 휀스를 설치하여 성토 장비로 인한 계측기 파손을 방지하여야 한다.

6) 매일의 성토공사 관련기록은 책임감리원으로부터 통보받아 분석시 활용하여야 한다.

나. 감독원의 조치사항

1) 본 용역의 수급인, 조성공사 책임감리원 및 시공사간의 회의를 정기, 수시로 개최하여 가. 2)항에 따라 수립된 성토계획대로 정연하게 성토되도록 조치하여야 하며, 특히 안정관리 구역에 대한 계획된 성토속도 준수 여부를 확인하여야 한다.

2) 조성공사 책임감리원과 협의하여 계측기 주변 성토가 가. 5)항과 같이 성토될 수 있도록 필요시 조성공사의 설계변경 등의 조치를 취하여야 한다.

3) 조성공사 시공사가 매일의 성토작업 결과 및 명일 작업계획을 용역 수급자에게 제출토록 제도화 및 이행 여부를 관리 감독

4) 계측기기 파손시 책임한계 규정 및 즉시 재매설토록 조치한다.

5) 계측 DATA, 분석 결과, 각종 보고서를 영구 보존토록 조치한다.

설  계  예 산 서

수 량 산 출 서

계측기 매설 도면