2017년도 사업발주계획

2017. 1.

국방전산정보원

목       차

1. 고객지원시스템 노후장비교체	1

2. 사무용 전산장비 도입	2

3. 전산운용 소모품 구매	3

4. ’17년 노후 네트워크 및 정보보호 장비 교체	4

5. 행정정보통합지원체계 성능개선	5

6. 예비군 홈페이지 및 모바일앱 개선	6

7. ’18 인사정보체계 유지보수	7

8. 국방군수통합정보체계 상용SW 및 기타장비 도입사업	8

고객지원시스템 노후 장비 교체 사업

(담당자 : 김선미,  02) 6424-5131)

1. 사업개요

사무용 전산장비 및 정보화 관련 서비스를 국방부 본부 및 국직 기관에 지원하는 통합 콜센터 고객지원 시스템용 노후장비 교체 사업임

2. 사업예산 : 300,000,000원(부가세 포함)

3. 사업기간 : `17. 7월 ~ `17. 10월

일 정	주 요 내 용
2017년 1 ~ 2월	- 사업계획 수립
2017년 3 ~ 4월	- 규격심의
2017년 5월	- 소요확정, 보안심의, 일상감사의뢰 등
2017년 6 ~ 7월	- 공고 및 입찰
2017년 7월	- 업체계약
2017년 7 ~ 10월	- 사업수행, 납품 및 검수

4. 사업내용

◦ 사업 수행기간 : `17년 7월 ~ ‘17년 10월

◦ 사업범위 : 고객지원 HW 및 상용SW 교체 및 커스터마이징

- 상용SW : ITSM 포함 콜센터 운영용 SW 10종 내외

- HW : 사설교환기 포함 서버 등 6대

5. 기타

◦ 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

◦ 사업범위 확정시 품목, 수량, 예산 변경될 수 있음

2017년 사무용 전산장비 도입

(담당자 : 000,  02)6424-0000)

1. 사업개요

내용연수가 만료된 노후 사무용 전산장비를 교체하고, 인가대비 부족 장비를 확보/지원하여 국방사무환경 개선을 위한 사업임

2. 사업예산 : 883,800,000원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2017년 3월 ~ 2017년 10월 / 약 8개월

일 정	주 요 내 용
2017년 2월 ~ 3월	- 시장조사 및 사업계획 수립
2017년 4월 ~ 6월	- 체계규격심의 추진, 제안요청서 작성
2017년 7월 ~ 9월	- 계약 및 사업수행(장비 납품 및 설치계획수립)
2017년 10월	- 사업수행(분배 및 설치), 최종검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업 수행기간 : 3월 ~ 10월

◦ 사업범위 : 데스크탑 컴퓨터 1,062대, 모니터 520대, 스캐너 26대

5. 계약방법 : 다수공급자(MAS)2단계 계약, 제3자단가계약

* PC 및 프린터, 스캐너는 리스 사업으로 발주 예정

전산운용 소모품 구매

(담당자 : 상사 윤성운,  02)6424-5134)

1. 사업개요

원활한 전산운용 및 업무 지원을 위한 전산운용 소모품 구매 사업

2. 사업예산 : 83,064,000원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2017년 2월 ~ 2017년 11월 / 약 10개월

일 정	주 요 내 용
2017년 2․5․8․10월	- 소요조사, 견적의뢰, 계약의뢰, 입찰공고
2017년 3․6․9․11월	- 계약
2017년 4․7․10․12월	- 검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 전산운용 및 업무 지원을 위한 각종 소모품 구매

◦ 장관 및 기타 행사 지원을 위한 소모품 구매

◦ 훈련 지원을 위한 각종 소모품 구매

5. 계약방법 : 전자 공개 수의

’17년 노후 네트워크 및 정보보호 장비 교체사업

(담당자 : 김현석,  02-6424-5153)

1. 사업개요

국방부 정보시스템의 안정적인 운영과 원활한 서비스를 제공하고 정보자원의 활용성을 극대화하기 위한 정보보호 장비 교체 사업임

2. 사업예산 : 883,900,000원(부가세 포함)

3. 사업기간 : `17. 3월 ~ `17. 10월

일 정	주 요 내 용
2017년 1월	- 사업계획 수립 (사업범위 확정)
2017년 3월	- 체계규격심의
2017년 4월	- 사업 공고 및 평가
2017년 5월	- 업체 계약
2017년 6~9월	- 사업 착수 및 구축
2017년 10월	- 검수

4. 사업내용

◦ 사업 수행기간 : `17년 3월 ~ ‘17년 10월

◦ 사업범위

- 노후 네트워크 장비 19대 교체: 백본 4대, L4 14대, 라우터1대

- 노후 정보보호 장비 8대 교체 : 방화벽 4대, IPS 4대

5. 기타

◦ 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

◦ 사업범위 확정시 품목, 수량, 예산 변경될 수 있음

행정정보통합지원체계 성능개선 사업

(담당자 : 김진수 주무관,  02)6424-5211)

1. 사업개요

국방부, 국직기관의 행정업무 지원을 위한 소규모 체계의 통합 구축 및 사용자 요구사항 반영을 위한 성능개선 사업

2. 사업예산 : 400,000,000원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2017년 6월 ~ 2017년 11월 / 약 6개월

일 정	주 요 내 용
2017년 2월 ~ 3월	- 체계규격 확정, 제안요청서 작성
2017년 4월 ~ 5월	- 계약의뢰, 입찰공고
2017년 6월 ~ 11월	- 계약, 체계 개발
2017년 11월 ~ 12월	- 시험평가 / 검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

대상체계	사업내용	비고
군의무수의사관 후보생모집	의무·수의사관후보생 역종분류를 위한 제출서류 접수·관리 시스템 개발	신규 개발
정보시스템 운영성과 측정 관리	국방부 및 국직기관 정보시스템 현황 및 운영 성과 관리하는 시스템 개발
성과관리시스템	성과평가 설정(평가단위/부서평가 메뉴) 기능 개선	성능 개선
군사제안시스템	제안 업무절차 변경 및 웹 표준화 대응을 위한 시스템 재개발
행정업무체계	보안, 복지관련 기능 사용자 편의성 개선
홈페이지	현충원, 국전원 홈페이지 웹접근성 개선 및 국직기관 홈페이지 개편

5. 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약방식)

예비군 홈페이지 및 모바일앱 개선 사업

(담당자 : 송기원,  02)6424-5213)

1. 사업개요

예비군 홈페이지 및 모바일앱의 Active-X 등 웹 비표준 기술을 제거하고 디자인 개선 및 웹 호환성 및 보안성을 개선하기 위한 사업임

2. 사업예산 : 325,000,000원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2017년 3월 ~ 2017년 6월 / 약 4개월

일 정	주 요 내 용
2017년 2월 ~ 3월	- 체계규격 확정, 계약의뢰, 입찰공고
2017년 3월	- 계약 및 사업착수
2017년 3월	- 상용SW 도입 및 우선적용
2017년 3월 ~ 6월	- 안정화 및 검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 표준화된 서비스 제공 및 보안강화

- 현 운용개념을 유지 및 정부에서 제시하는 표준보안정책 적용

- NonActive-X, HTML5 적용 등

◦ 사용자 환경개선

- 최신 트랜드에 맞는 UI 및 UX 개선

- 다양한 OS 및 브라우저에서 안정적인 서비스 지원

◦ 상용SW 신규 도입 및 적용

- 인증서 이동 솔루션 신규도입으로 독자적인 인증서 이동 기능 구축

- 구간암호화, 공인인증, 문서위변조, 키보드보안 솔루션 도입 및 적용

5. 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약방식)

‘18년 국방인사정보체계 유지보수

(담당자 : 중령 김동현,  02)748-0939)

1. 사업개요

국방인사정보체계 운용 간 발생된 법‧제도개선 사항 및 추가기능 보완과 국방인사정보체계를 최적의 상태로 유지·관리하고 장애 및 사용자 요구사항에 능동적으로 대처하여 시스템을 안정적으로 운영하기 위한 업무별 각 군 활용 지원하는 유지보수 사업임.

2. 사업예산 : 1,136,000,000원(부가세 포함)

* 관련근거 : 18-22 국전원 중기계획

3. 사업기간 : 2018년 1월 ~ 2018년 12월 / 약 12개월

일 정	주 요 내 용
2017년 10월 ~ 2017년 11월	- 제안요청서 작성 및 조달공고(1차)
2017년 12월	- 조달공고(2차), 제안서 평가, 계약체결
2017년 12월	- 사업수행계획서 검토 및 승인
2018년 1월 ~ 12월	- 사업수행(착수보고, 형상관리, 실적관리)

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 운용중인 인사정보체계에 대한 기능개발 및 유지보수 수행

- 제시된 계획 유지보수 과제 수행

- 법, 규정, 제도 변경 및 오류사항에 따른 S/W 수정

- 명시된 상용소프트웨어에 대한 유지보수 수행

- 체계 모니터링, 장애 발생 시 원인 분석 및 복구 조치

◦ DB 보안, 개인정보암호화 등 응용체계 보안 업무 수행

5. 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약방식)

국방군수통합정보체계 상용SW 및 기타장비 도입사업

(담당자 : 양재영,  02)748-0986)

1. 사업개요

현재 진행중인 국방군수통합정보체계 구축사업(`15.12월~`18.11월, 현재 설계단계) 관련 상용SW 및 기타장비를 도입하는 사업임

2. 사업예산 : 970,000,000원(부가세 포함)

3. 사업기간 : `17. 7월 ~ `17.12월

일 정	주 요 내 용
2017년 1월	- 사업계획 수립 (사업범위 확정)
2017년 4월	- 체계규격심의
2017년 4월	- 제안요청서 작성
2017년 5월	- 사전규격공개
2017년 6~7월	- 공고 및 입찰
2017년 8월	- 업체계약
2017년 8월~12월	- 납품 및 검수

4. 사업내용

◦ 사업 수행기간 : `17년 8월 ~ ‘17년 12월

◦ 사업범위 : 상용SW 및 기타장비 도입

- 상용SW(3종) : WAS, 잡스케줄러, SSO

- 기타장비(4종) : 스캐너, 태블릿, 3D측정기, 차량위치추적단말기

5. 기타

◦ 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약), 제3자단가계약

◦ 사업범위 확정시 품목, 수량, 예산 변경될 수 있음