'18년 시설공사 발주예정사업 현황

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조의 2(계약관련정보의 공개)의 규정에 의거 '18년 시설공사 발주예정사업 현황을 다음과 같이 공고 합니다.

※  첨부된 공고 내용 중 사업명, 사업범위, 발주시기, 예산 등은 일부

변동될 수 있음을 알려드립니다.

기타 공고 내용에 대한 문의는 아래의 연락처로 문의 바랍니다.

문의 : 공군 제15특수임무비행단 재정처 시설공사계약담당 원사 이승원(031-720-3185)

※ 붙임 : '18년 시설공사 발주예정사업 현황

2018. 1. 9.

공군 제15특수임무비행단 재무관

'18년 시설공사 발주예정사업 현황

□ 시설공사                                                      (단위 : 천원)

순번	공종	사 업 명	예 산 액	발주예정	계약예정	공사 준공	비 고
1	건축	시설대대 지붕보수공사	75,000	1월4주	2월3주	5월3주	15비
2		현)정보통신대대 지붕방수	115,000	1월4주	2월3주	5월3주	15비
3		엄체호 방탄문 롤러 교체	200,000	1월4주	2월3주	5월4주	15비
4		유류관리중대 비상급유창고 출입문 보수	30,000	1월4주	2월3주	5월4주	15비
5		영내관사 노후 샷시 교체	261,930	1월4주	2월3주	5월4주	15비
6		항공작전요원 복지시설 신축	8,509,013	3월1주	3월2주	19년 4월2주	국군재정단
7		방부관리 정비고 신축	3,227,166	5월2주	5월3주	19년 5월3주	국군재정단
8		구)통합소대 건물보수	228,000	3월3주	4월2주	8월2주	15비
9		화지대 화장실 리모델링	47,000	3월3주	4월2주	8월2주	15비
10		외곽 경계초소 신축 및 기동순찰로 조성	1,836,104	5월2주	5월3주	19년 6월3주	15비
11		방부관리 정비고 신축공사	2,763,440,000	9월1주	9월3주	19년10월4주	국군재정단
12		작전지휘부 시설교체	22,756,000	10월2주	10월3주	19년 11월3주	국군재정단
13	토목	서편활주로 남단 라인펜스 교체	57,000	2월3주	3월3주	5월4주	15비
14		기지 내 가드레일 설치	88,000	2월3주	3월3주	5월4주	15비
15		영외POL 도로개선 및 울타리 설치	403,108	5월2주	5월3주	18년 11월4주	15비
16		B.X 주차장 포장	46,000	3월3주	4월2주	7월4주	15비
17		항공정비전대 주차장 신설	150,000	3월3주	4월2주	7월4주	15비
18		테니스장 인조잔디 설치공사	162,000	3월3주	4월2주	7월4주	15비
19	건축 / 기계	노후 냉난방시설 교체	223,391	3월3주	4월2주	8월2주	15비
20		공항관리대 냉동기 보수	72,000	3월3주	4월2주	8월2주	15비
21		국빈행사장 공조기 보수	35,000	3월3주	4월2주	8월2주	15비
22		화생방방호시설(MCPS) 보수	100,000	3월3주	4월2주	8월2주	15비
23	설비	오수관로 개선	712,247	5월2주	5월3주	19년 5월3주	15비
합 계 (총23건)			2,802,773,959