'18년도 대규모 보수공사 사업 추진계획(예정)

사 업 명		공사금액 (천원)	공 사 추 진
			공사의뢰	공사완료
계		6,398,355
노후 변압기 교체 (해군분청, 공)기상단 변압기)		158,000	2월 1주	6월 4주
노후 분전반 교체 (1,2분청 노후 분전반)		130,000	2월 3주	8월 4주
노후 냉난방시설 교체 (문서고 냉동기 교체)		280,000	3월 2주	6월 4주
병영식당 노후배관 교체 (경비단 식당)		200,000	2월 2주	4월 5주
냉방기기 세관		310,000	3월 2주	6월 2주
난방기기 세관			7월 1주	11월 2주
노후 오수관로/오수펌프 교체 (본청 지하1층)		123,737	3월 4주	6월 4주
병영생활관 노후 지붕방수 (육군군악의장대, 숫용추소초 등)	국.재정단 의뢰	610,000	4월 4주	10월 2주
계룡대 본청 보수보강		256,594	3월 1주	6월 2주
본청2층 노후복도 개선	국.재정단 의뢰	480,000	3월 4주	8월 4주
노후 복도 및 창호교체 (단본부 및 공군 기상단)	국.재정단 의뢰	330,000	4월 2주	6월 3주
계룡대아파트 노후세대 보수 (22평형 16개소)	국.재정단 의뢰	360,000	4월 1주	8월 4주
노후 도로 (본청 주변도로, 주차장)	국.재정단 의뢰	406,628	3월 2주	5월 4주
노후 군악연주실 (해군 군악의장대대 연주실)		300,000	3월 2주	5월 4주
노후고압선로공사 (3정문 ↔해군동력실)	국.재정단 의뢰	360,000	2월 4주	9월 4주
비축유류탱크 세척 / 도장 (문서고)		190,396	2월 2주	6월 4주
방재설비 및 중앙감시시스템 교체 (충청시설단)	국.재정단 의뢰	1,903,000	5월 4주	2년