'20년 시설공사 발주예정사업 현황

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조의 2(계약관련정보의 공개)의 규정에 의거 '20년 시설공사 발주예정사업 현황을 다음과 같이 공고 합니다.

※  첨부된 공고 내용 중 사업명, 사업범위, 발주시기, 예산 등은 일부

변동될 수 있음을 알려드립니다.

기타 공고 내용에 대한 문의는 아래의 연락처로 문의 바랍니다.

문의 : 공군 제15특수임무비행단 재정처 시설공사계약담당 원사 이승원(031-720-3185)

※ 붙임 : '20년 시설공사 발주예정사업 현황

2019. 01. 22.

공군 제15특수임무비행단 재무관

'20년 시설공사 발주예정사업 현황

□ 시설공사(소규모)                                              (단위 : 천원)

순번	공종	사 업 명	예 산 액	발주예정	계약예정	공사 준공	비 고
1	건축	국빈행사장 정현관 로비 레드카펫 교체	44,000	1월3주	1월4주	2월4주
2		비상발전실 환기설비 개선	22,000	1월3주	1월4주	2월4주
3		수송대대 주차장 포장면 보수	30,000	2월2주	2월3주	3월2주
4		기지외곽 수문 보수	160,000	3월2주	3월3주	4월3주
5		급유대(경유) 작업장 캐노피 설치	35,000	3월2주	3월3주	4월3주
6		국빈행사장 탑승교 보수	17,000	3월2주	3월3주	4월3주
7		257비행대대 샤워장 개선	20,000	3월2주	3월3주	4월3주
8		노후 오수관로 개선	80,000	3월2주	3월3주	4월3주
9		경원진지 외곽펜스 교체	30,000	4월2주	4월3주	5월3주
10		기동1소대 작전차량 차고 보수	30,000	4월2주	4월3주	5월3주
11		국빈행사장 환영현판 교체	17,500	4월2주	4월3주	5월3주
12		안보지원부대 노후울타리 교체	35,000	4월2주	4월3주	5월3주
13		영내관사 보도블럭 교체	130,000	4월2주	4월3주	5월3주
14		간부숙소 방충망 교체	18,000	4월2주	4월3주	5월3주
15		유류탱크 추락 방지시설 설치	20,000	5월2주	5월3주	6월2주
16		라인지역 노후 도로 보수	50,000	5월2주	5월3주	6월2주
17		기지강당 오수배관 교체	20,000	6월1주	6월2주	7월2주
18		255 비행대대 MCPS 방폭문 보수	18,000	7월1주	7월2주	8월2주
19		256정비중대 MCPS 내부 방수 및 재도장	45,000	8월1주	8월3주	9월3주
20		간부숙소 도어락 설치	19,000	9월4주	9월5주	10월2주
9	전기 / 기계	유류관리중대 노후 보일러 교체	25,000	3월2주	3월3주	4월3주
10		기관격납고 노후 냉난방기 보수	20,000	7월2주	7월3주	8월3주
11		공항관리대 터보냉동기 설비 교체	28,500	7월4주	8월2주	9월2주
15	소방 / 설비	항공기 세척시설 전력설비 개선	75,000	3월2주	3월3주	4월3주
16		BOQ C동 노후 보일러 교체	100,000	3월2주	3월3주	4월3주
17		BOQ D동 보일러 교체 [주거시설]	108,000	3월2주	3월3주	4월3주
합 계 (총17건)			1,197,000

□ 시설공사(대보수)                                              (단위 : 천원)

순번	공종	사 업 명	예 산 액	발주예정	계약예정	공사 준공	비 고
1	건축	영내관사 창호 교체(101동, 103동)(대규모)	660,000	2월 1주	3월 2주	8월 2주
2		실내사격장 노후 사격장비 교체(대규모)	200,000	3월 3주	4월 2주	7월 2주
3		영외관사 발코니 보수(31동)(대규모)	219,715	3월 3주	4월 2주	8월 2주
7	토목	#1-1 수문보강(대규모)	300,000	3월 2주	3월 4주	7월 4주
8		부대 테니스장 개선(대규모)	250,000	3월 3주	4월 1주	7월 1주
9	전기	국빈행사장 조명탑등 및 변압기 접지시설 개선(대규모)	51,000	2월 1주	2월 4주	6월 4주
10		C지구 외곽 전력설비 개선(대규모)	70,000	2월 1주	2월 4주	6월 4주
11		296 엄체호 방폭등 교체(대규모)	120,000	2월 1주	2월 4주	6월 4주
12	기계	296 엄체호(#4, #8) 방탄문 롤러 교체 및 재도장(대규모)	200,000	2월4주	6월3주	10월3주
13	건축 / 기계 / 전기	병사 목욕탕 내부 방수(대규모)	110,000	2월 1주	2월 4주	5월 4주
14		3번 격납고 2층 화장실 개선(대규모)	52,000	3월 3주	4월 2주	7월 2주
15		복지회관 2층 화장실 개선(대규모)	48,000	3월 3주	4월 2주	7월 2주
14		병사식당 조리원 휴게실 개선(대규모)	60,007	3월 3주	4월 2주	7월 2주
15	기계 / 전기	257대대 노후 냉난방 설비교체	350,000	3월 1주	3월 3주	7월 3주
16		3번 격납고 보일러 교체	95,000	3월 1주	6월 1주	10월 1주
17		자율관 나동 보일러 교체	120,000	3월 1주	6월 1주	10월 1주
합 계 (총17건)			2,905,722

□ 시설공사(신영공사)                                             (단위 : 천원)

순번	공종	사 업 명	예 산 액	발주예정	계약예정	공사 준공	비 고
1	종합	석면함유건축물 개선(신영)	330,000	6월 중 (설계용역중)	6월 ∼ 7월 중	계약일(착공)로 부터 180일
2	기계	기지 배수체계 개선(신영)	2,610,000	8월 ∼ 9월 중 (설계용역중)	9월 ∼ 10월 중	계약일(착공)로 부터 365일
3		세차폐수처리시설 개선(신영)	280,000	10월 중 (설계용역중)	11월 ∼ 12월 중	계약일(착공)로 부터 120일
합 계 (총4건)			3,220,000

'20년 용역 발주예정사업 현황

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조의 2(계약관련정보의 공개)의 규정에 의거 '20년 용역 발주예정사업 현황을 다음과 같이 공고 합니다.

※  첨부된 공고 내용 중 사업명, 사업범위, 발주시기, 예산 등은 일부

변동될 수 있음을 알려드립니다.

기타 공고 내용에 대한 문의는 아래의 연락처로 문의 바랍니다.

문의 : 공군 제15특수임무비행단 재정처 용역계약담당 중위 권용범(031-720-3190)

※ 붙임 : '20년 용역 발주예정사업 현황

2019. 01. 22.

공군 제15특수임무비행단 재무관

□ 설계용역

순번	구분	사 업 명	예 산 액	발주예정	계약예정	계약 기간	비 고
1	실시	20-15-1 설계	54,053,000	1월 3주	1월 4주	계약일(착수)로 부터 100일
2	실시	석면함유건축물개선 설계	10,355,000	1월 3주	1월 4주	계약일(착수)로 부터 150일
합 계 (총4건)			64,408,000

□ 일반용역

순번	구분	사 업 명	예 산 액	발주예정	계약예정	준공 예정	비 고
1	실시	국빈행사장 조경용역	83,448,000	1월 3주	2월 4주	10월 4주
2	실시	기지 내 제초용역	386,074,000	3월 1주	3월 4주	11월 4주
3	일반	사업장폐기물(폐합성수지) 등 처리	39,820,000	1월 4주	2월 3주	11월 4주
4	외주 정비	항행안전시설 외주정비	59,017,000	6월 4주	8월 1주	’20년 7월 4주
5	외주 정비	소형무인기 대응체계 외주정비	112,956,000	1월 4주	2월 3주	12월 3주
합 계 (총4건)			681,315,000