시설공사계약 특수조건(Ⅱ)

【특수조건 2호 2012. 5. 7. 】

【특수조건 42호 2020. 10. 20. 】

제1조(공사관리) ① 공사는 계약관리를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 소속 직원, 책임감리 시행업체의 책임감리원 또는 공사가 지정하는자(이하 “감독원”이라 한다)로 하여금 공사현장에 대하여 다음 각 호의 사항을 조사․점검하거나 계약자에게 자료를 요구할 수 있다.

1. 시공상태

2. 안전관리 상태

3. 설계변경등 계약내용변경에 관한 사항

4. 공사현장 관리상태

5. 하도급에 관한 사항(하도급자의 공사실적, 하도급금액의 산출근거등)

6. 공사현장 환경영향평가 협의내용 이행상태 및 환경관리상태

7. 기타 계약조건 이행사항

② 공사는 제1항에 의한 조사․점검결과 계약자가 계약조건 및 설계서등의 계약내용과 합치되지 않게 시공한 사항에 대하여는 계약상대자에게 통보하여 시정토록 조치할 수 있다.

③ 공사는 제1항 또는 제2항의 결과를 국가계약법 시행령 제13조및 제42조의 규정에 의한 심사에 반영할 수 있다.

제2조(계약자의 현장 기구) ① 계약상대자는 계약일로 부터 30일 이내에 감독원에게 본 계약이행과 관련된 모든 부서를 명시한 상세한 현장 기구표를 제출해야 한다.  이 기구표는 감독원이 요구하는 정도까지 상세히 기술되어야 한다.

② 계약상대자는 감독원의 요구에 따라서 또는 작업진척에 따라 기구의 범위를 수정하고 인원도 최근의 것으로 기입한다.

③ 계약상대자는 공사현장의 품질보증체계 유지를 위하여 조직적으로 독립되고, 현장품질 보증체계 유지에 충분한 인원으로 구성된 품질 보증조직과 품질관리(품질확인)조직 및 그들 조직의 책임자를  현장에 상주시켜야 하며, 이는 하도급에게 위임할 수 없다

④ 계약상대자는 현장 품질조직의 실질적이고도 현실적인 독립성 보장을 위해 현장 품질보증 및 관리책임자의 책임과 권한이 공정(공기) 및 공사비용과 관련된 여타조직의 간섭을 받음이 없이 독립적으로 행사 되어야 함을 천명하는 내용의 문서에 계약자의 대표이사가 친필서명하여 계약자의 현장책임자에게 보내는 문서의 사본1부를 감독원에게 제출하여야 한다

⑤ 계약상대자는 기구표에 따른 계약자의 필수요원들의 이력서를 제출하여 감독원의 승인을 얻어야 한다.  필수요원은 현장소장, 품질보증/관리 책임자, 공정관리 책임자, 현장설계 책임자 및 시공관리 책임자를 말한다.

⑥ 감독원의 서면승인 없이는 계약자는 필수요원의 재임명이나 교체를 할 수 없다.

⑦ 감독원의 서면승인 없이는 계약상대자는 현장기구에 소속된 직원을 본 계약이행과 관련없는 타 업무에 종사토록 할 수 없다.

제3조(종합 시공관리체계 구성 및 운영) 계약상대자는 감독원이 요구하는 시점에 현장 시공관리조직 운영과 유자격 전문기술인력 확보 및 활용방안을 포함하는 종합 시공관리계획을 수립하여 공사가 제공하는 각종 절차서 내용 및 의견을 반영․제출하여 감독원의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

제4조(사업관리 시스템 운용) ① 계약상대자는 공사의 공정, 사업비, 자재, 자료, 사업정보등 사업관리시스템에 부합되는 자체관리 시스템을 개발, 운용하여야 하며, 시공관련 정보 및 자료를 공사가 제공하는 사업관리 관련 절차서 내용이나 감독원의 지시에 따라 적기에 제공하여야 한다.

제5조(공정관리) ① 계약자 공정관리 절차서 : 계약상대자는 공사가 제공하는 공정관리 절차서에 따라 계약상대자의 공정관리 절차서를 작성하여 공사의 세부공정계획 수립 및 공정진행을 분석 평가하여야 한다.  이 절차서는 계약체결후 30일이내에 제출하여 감독원의 승인을 받은후 사용하여야 하며, 최소한 아래사항이 포함되어야 한다.

1. 공정관리업무 수행조직

2. 공정관리방법

3. 공정표 개발 및 진도관리방법

4. 공정보고업무 수행방법

5. 공정관리를 위한 전산운용방법

② 계약상대자는 ①항의 공정관리 절차서를 소정의 기간내에 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

③ 공정관리조직 : 계약상대자는 공정관리 전담조직을 구성, 운영하여야 하며 세부운영절차는 계약상대자 공정관리 절차서에 포함하여야 한다.

④ 공정표 작성 및 운영 : 계약상대자는 공사가 제시하는 관리기준 공정표 및 절차서에 따라 계약자공정표를 작성해야 하며 계약자는 계약자공정표에 따라 하위등급 공정표를 작성, 운영하여야 하고 등급구분과 작성기법 및 제출기한은 공사가 제공하는 공정관리 절차서 요구조건에 따라야 한다.

⑤ 계약상대자는 CPM방식 PDM기법으로 작성되는 계약자공정표를 감독원의 요구에 따라 인쇄본과 공사의 전산소프트웨어에 수정없이 바로 입력이 가능하도록 전자 File를 동시에 제출하여야 한다.

⑥ 공정보고 : 계약상대자는 시공진도현황을 파악할 수 있는 제반자료가 포함된 보고서를 작성하여 정기적으로 또는 감독원의 요구가 있을 시 제출하여야 하며, 양식, 보고시기 및 보고내용 등은 감독원이 제시하는 요구조건에 따라야 한다. 계약상대자가 제출하는 보고서 종류는 다음과 같다.

1. 월간 공정보고 : 계약자는 매월 아래와 같은 내용을 포함한 월간 공정보고서를 제출해야 한다.

㉮ 당해기간에 수행한 실공정 및 차월계획

㉯ 당해기간에 사용된 주요장비실적 및 차월계획

㉰ 공종별 실투입인원 및 차월계획

㉱ 계약상대자가 공급하는 자재목록, 보유현황 및 현장반입 관련현황

2. 중요문제점 보고서 : 계약상대자는 계획된 공정수행에 중대한 영향을 미치거나 미치게 될 문제점에 대한 원인분석 및 대책을 수립하여 감독원에 보고하여야 한다.

⑦ 공정관리를 위한 전산운용방법 : 계약상대자는 공사가 보유하고 있는 공정관리용 소프트웨어(P3,프리마베라)와 호환성이 있는 소프트웨어를 사용하여 계약자공정표를 작성, 운영하여야 한다.

제6조(사업비관리) ① 계약상대자는 공사가 제공하는 사업관리관련 절차서의 내용을 준용하되 사업비관리절차 중 계약자 의무사항을 준수하여야 한다

② 계약상대자는 계약기간동안 월별 예상공사비 소요계획서를 분기별로 감독원에게 제출하여야 한다

③ 계약상대자는 감독원의 요청이나 지시가 있을 경우 계약자의 공사비에 관련된 서류를 즉시 제출하여야 한다

④ 계약상대자는 건설기술관리법 제38조 제15의 ②항에 의거 공사착수이후 공정ㆍ공사비 통합성과보고서(별도지정양식)를 매월 말 기준으로 작성하여 익월 5일까지 제출하여야 한다.

제7조(자재관리) ① 계약상대자 자재관리 절차서 : 계약상대자는 공사가 제공하는 자재관리 절차서에 따라 계약자는 자재관리절차서를 작성 운영해야 하며, 계약체결후 3개월이내에 감독원에 제출하여 승인을 득한 후 사용하여야 한다

② 자재관리 전산시스템 운영 : 계약상대자는 공사가 운영하는 자재관리체계에 부합되는 전산시스템을 구축운영하여야 하며 공사범위에 포함된 제반 소요자재(지급 및 사급)의 공종별 규격별 물량을 산출하여 공사진척을 추적 할 수 있도록 관리하여야 하며, 공사가 요구하는 일정 및 양식에 따라 디스켓과 보고서를 함께 감독원에게 제출하여야 한다

③ 현장 자재관리 업무지원 : 계약상대자는 공사가 현장에서 수행하는 자재 추적관리에 대한 지원업무를 수행해야 하며 지원업무와 방법은 공사 자재관리절차서에 따른다

제8조(자료관리) ① 계약상대자는 자료관리 대상에 속하는 모든 문서와 자료를 관리하는 자료관리 전담조직과 인력을 배치하여야 하며 모든 접수, 발송창구를 일원화 하여야 한다

② 계약상대자는 관리대상 자료를 자료별 특성에 따라 적합한 관리체계를 수립하여 관리하되 공사가 제공하는 자료관리절차서등 각종 절차요건에 따라 내부절차를 수립, 운영하여야 한다

③ 인천국제공항건설업무가 대형건설사업이며 여러계약자들에 의해 설계, 시공되어지는 사업이므로 공사가 개발 제시하는 사업번호체계에 따라 도면 및 사업자료를 생산 관리하여야 한다

④ 계약상대자는 공사가 제공자료 및 계약자 생산자료에 대해 추적 및 검색이 가능하도록 중앙집중 방식의 자료관리 전산시스템을 구축 운영하여야 하며, 이 시스템은 현장에서 사용중인 도면이 가장 최근의 개정판임을 확인 할 수 있어야 한다

⑤ 계약상대자는 공사중에 발생된 모든 자료관리 기록을 체계적으로 수집, 보관관리 하여야 하며 준공 이전에 공사의 기록 이관절차에  따라 체계적으로 이관하여야 한다

⑥ 계약상대자는 인천국제공항 건설사업의 효율적인 정보공유와 공사 및 관련사의 자료관리 업무를 위하여 필요한 경우 계약자 상호간 또는 공사 관련 부서와의 긴밀한 협조체계를 유지해야 한다

제9조(품질보증 및 관리) ① 계약상대자는 아래의 기준에 맞는 품질보증 활동을 수행할 책임이 있으며, 기준이 서로 상이할 경우에는 엄격한 순위에 따른다.

1. 국제품질규격 ISO 9001 및 품질시방서

2. 건설기술관리법

② 계약상대자는 품질보증활동에 관련한 아래의 서류를 작성, 계약발효일후 45일 이내에 또는 품질관련업무 착수전 관리본 5부를 감독원에 제출하여 승인을 받아야 한다.

1. 품질보증계획서 및 품질검사, 시험, 감사등 품질확인절차서

2. 특수공정관리절차서 및 계약서에 명시된 업무절차서

③ 계약상대자는 달리 규정되어 있지 않는 한 ②항의 서류를 제출하여 감독원의 검토 또는 승인을 득하기 전까지는 관련작업을 착수할 수 없으며, 감독원의 승인 및 검토없이 계약자가 작업을 수행함으로써 발생하는 공기지연 또는 비용손실의 책임은 전적으로 계약자가 진다. 만약 정해진 기간내에 만족할 만한 ②항의 서류를 제출하지 못하고 또한 이에대한 대책을 제출하지 않으면 감독원은 공사를 중지시키거나, 만족한 최종 계획을 제출할때까지 선금 및 기성금지급을 유보할 수 있다

④ 감독원은 계약상대자의 계약 이행업무중 중대한 문제점이 발생시 작업중지를 요청할 권리를 가지며, 계약상대자는 작업중지 요청서 접수후 즉각 작업을 중지하고 필요한 조치를 취한 후 결과를 감독원에 서면으로 보고하여야 하며, 감독원의 승인없이는 해당작업을 재착수할 수 없다. 이러한 작업중지에 따른 제반책임은 계약자가 진다.

⑤ 계약상대자는 작업공정에 대한 검사 및 시험계획을 작성후 감독원에게 제출하여 입회점(Witness Point) 및 정지점(Hold Point)을 지정받아야 하며, 실제 작업개시 7일전에 감독원에 입회요청을 하여야 한다.

⑥ 계약상대자는 작업완료시에 공사가 승인한 절차서에 따라 품질기록을 수집, 분류, 색인 및 편철하여 감독원에 제출하여야 하며 품질기록은 실제 작업과정 또는 구조물별로 명확히 추적될 수 있도록 사전에 관리체계가 수립되어야 한다.

⑦ 계약상대자는 다음과 같은 중대결함 인지후 감독원에 구두로 즉시 보고하고 감독원의 최종처리방안 검토를 위해 7일 이내에 결함내용, 기술적 검토결과 및 조치계획 등을 문서로 작성하여 제출하여야 한다.

1. 품질보증계획서상의 주요결함(단, 통상적인 부적합사항은 제외)

2. 건설을 위해 승인된 최종설계상의 주요결함으로서 설계기준에 명시된 기준의 위배사항

3. 구조물 혹은 기자재 건설상의 주요손상으로서 광범위한 평가, 재설계 및 수리가 요구되는 사항

제10조(품질조정회의) ① 계약상대자는 계약후 45일이내에 공사 품질보증조직의 대표를 만나서 계약상대자의 품질보증체계에 대해 협의해야 한다

② 회의록은 계약상대자와 공사 품질보증조직의 대표 쌍방이 서명날인 하여야 하며, 계약문서의 일부로 간주한다

③ 필요시 상호 이해를 재확인하기 위하여 후속회의가 경우에 따라 소집될 수 있다

제11조(착공, 시공 및 준공) ① 계약상대자는 계약이 발효되면 공사에 착공계를 제출하고 지체없이 계약서 내용대로 업무를 착수해야 한다.

② 계약상대자는 공사착수와 동시에 시공이 가능하도록 인력, 자재, 장비 등 자원투입에 차질이 없도록 조치하여야 하며, 공사착수후 15일 이내에 착수보고회를 개최하여야 한다.

③ 계약상대자는 공사의 “관리기준 공정표”(수정,변경사항 포함)에 표시된 공정, 공기 및 타 공사와의 상호관계에 대한 요건을 준수할 수 있도록 모든 작업을 수행해야 한다.  계약상대자의 모든 공정계획은 관리기준 공정표의 기본계획 범위내에서 작성, 평가되어야 한다.  이 관리기준 공정표는 본 계약서에 뿐만 아니라 공사목적물 완성에 필요한, 그리고 계약상대자의 시공계획에 관계되거나 영향을 미칠지도 모를 다른 시공계획에도 적용 된다.

④ 계약상대자가 관리기준 공정표에 따라 주요 공사항목을 완성하면 공사는 후속 공종작업에 착수하게 되며, 이러한 후속작업은 계약상대자가 본 계약하에 수행한 공사에 대해 합격여부를 판정하는 방편이 될 수 있다.  만약 계약상대자가 주요 공사항목을 완성하는 일자가 지연되어 공사의 후속 공종작업 본래의 소요기간을 단축할 수 없는 경우에는 결과적으로 준공일이 지연될 수 있을 것인 바, 이는 지체상금 부과의 원인이 될 수 있다. 이 경우 “준공이 지연된 것은 공사의 후속작업 완성 지연 때문이므로 이는 정당한 지연이다”라고 주장하여서는 안된다.

⑤ 계약상대자는 공사의 적기준공을 위해 충분한 노동력, 시설 및 장비의 제공, 시간외 근무와 교대근무 등의 필요한 모든 조치를 강구하여야 한다.

제12조(좌표와 표고) ① 기본측량 기준점(삼각점 및 수준점)은 공사가 설치한다.

② 계약상대자는 모든 시공대상물의 현장배치를 하여야 하며, 이를 위해 도면상에 나타난 위치, 좌표 및 표고에 맞게 시공을 하기 위한 모든 조건을 준수할 의무가 있다.

③ 감독원은 도면상의 좌표와 표고를 공사진척에 따라 조정할 수 있다.

④ 계약상대자는 어떤 측량기준점을 이용시 파괴 혹은 부정확하게 만들었을 경우 감독원이 만족할 수 있도록 계약상대자의 부담으로 이를 대체하여야 한다.

제13조(진도) ① 계약상대자는 각종공사 수행전 이를 위한 세부공사 계획에 대하여 충분한 정보를 공사에게 주어야 한다.

② 공사의 진행도중 언제라도 계약상대자의 실질적인 진도가 계약상의 요건을 충족시키기에 미흡한 경우, 감독원은 계약상대자에게 진도를 개선시키는데 필요한 조치를 강구하도록 요구할 수 있다.

③ 공사가 승인한 “계약자공정표”를 충족시키기 위하여 계약상대자의 공사수행에 개선이 필요하다고 인정될 경우, 감독원은 그 이행을 요구할 수 있다.

④ 공사가 제2항 및 제3항의 지시를 하였거나 지시하지 아니 하였다고 하여 계약서에 명시되는 공사의 질과 진도율에 대한 계약자의 의무가 면제되는 것은 아니다.

⑤ 계약상대자가 감독원의 지시에 순응하지 않는 것은 계약상대자가 정해진 공기내에 공사의 준공을 보장할 정도로 성실히 공사를 수행하지 않고 있다는 근거가 될 수 있다.  그렇다고 판단되면 공사는 본 계약서의 적용조항에 따라서 계약 또는 그 일부의 수행을 진척시켜 나갈 계약자의 권리를 종결시킬 수 있다.

⑥ 공사시행에 있어 공사지역내 또는 인접지역에 후행공사(타 계약패키지)의 시행에 차질이 발생치 않도록 각 시설에 대한 계획을 검토한 후 공정계획을 수립하여야 하며, 계획된 공정은 감독원의 지시에 따라 조정(단축) 할 수 있으며 시공자는 이에 따라야 한다.

제14조(검사 및 시험) ① 본 계약서에 별도의 명시가 있는 경우에는 그에 따르고, 명시가 없는 경우에는 계약상대자는 공사계약 특수조건에 첨부된 “인천국제공항 건설 품질시방서”에 따라 시공과 관련된 기자재 및 수행된 공사에 대하여 검사 및 시험을 하여야 한다

② 계약상대자의 업무수행은 항상 감독원의 “품질활동” 즉, “감독”, “품질검사”(Quality Surveillance) 및 “품질감사”(Quality Audit)의 대상이 된다.  이 경우 계약상대자는 감독원이 수행하는 품질활동을 위하여 필요한 설비, 각종견본, 각종도면, 각종목록 및 문서 등을 제공하여야 하며, 감독원이 “품질활동”을 위하여 계약자 현장 등을 자유롭게 출입하고 품질관련문서를 열람할 수 있도록 하여야 하며, 감독원의 요구시 검사 및 시험을 위하여 필요한 협조와 제반편의를 제공하여야 한다.

③ 계약상대자는 감독원의 품질활동 시행전에 공사의 부분이나 전체를 완료함으로써 원상복구 및 대체가 필요하다면 이에 대한 비용을 부담하여야 한다.

④ 품질검사를 하지 아니하였거나 미비한 시공기술 및 불량기자재의 사용을 발견하지 못했거나 또는 이에 대한 공사비를 지불하였거나 그를 인수하였다고 해서 그후 발견된 미비점에 대하여 하자담보책임기간 중 불합격 또는 개수 를 지시할 수 있는 감독원의 권리는 감소되지 아니한다.

⑤ 감독원은 계약상대자가 제공한 공사자재와 수행한 공사가 계약조건과 일치하지 않는다고 판단될 때에는 이의 사용가능성 여부를 판정하기 위하여 공사의 타 계약자 또는 감독원이 지정한 기관에 정밀검사, 시험 및 조사를 의뢰할 수 있으며 그 결과가 계약조건과 일치하지 않을 경우 이에 대한 소요비용은 계약자가 부담하여야 한다.

⑥계약상대자는 계약조항에 맞지않게 시공된 부분에 대하여는 추가부담없이 재시공 또는 보완하여야 하며, 만약 감독원이 지적한 사항에 대하여 재시공 또는 보완하지 않을경우 감독원은 다른방법에 의해 제거 또는 보완한 후 계약상대자에게 그 비용을 분담케 하거나  벌칙으로 계약상대자의 시공권한을 중지시킬 수 있다.

제15조(추가검사 및 시험) ① 공사용 기술시방서에 정한 검사,시험 또는 점검 이외의 검사나 점검을 감독원이 요구할 때에는 계약자는 이에 응하여야 한다.  이와 같은 추가검사가 감독원에 의해 수행될 경우 계약상대자는 필요한 견본을 준비하여야 하며, 시험기간중 관련공사를 일시 중단하고, 기자재와 공작물에 대한 시험을 수행할 수 있도록 최대한 협조하여야 한다.

② 최종인수전에 기완공된 공사의 일부분을 제거하여 행하는 검사가 필요한 경우, 계약자는 감독원으로부터 그런 통보를 받는 즉시 검사에 필요한 시설, 노동력, 자재 등을 공급하여야 한다.

③ 검사결과 그 공작물에 계약조건과 합치되지 아니하는 중요사항이 발견되고 이것이 계약상대자의 과실인 경우, 검사의 경비 및 완전한 재시공의 경비는 계약상대자가 부담하며, 상기 경우가 아닌 때에는 공사가 부담한다.

제16조(공사의 공급도면 및 기술시방서) ① 공사는 본 공사계약서에 포함되는 공종별 설계도면을 제공하며 그러한 도면에는 작업수행상 필요로 하는 모든 정보가 포함되어 있다.

② 계약상대자는 실공사착수 3개월전까지 소요도면 목록을 조사하여 감독원에 제출해야 한다.

③ 계약상대자는 공사가 제공한 도면을 검토하고 어떤 누락이나 상이점이 있을시 지체없이 이를 감독원에 통보하여야 한다.

④ 현장설명시 참고자료로 제시된 시방서와 도면은 입찰자가 입찰서 작성을 가능하게 하기 위한 단순한 입찰용 정보제공에 불과하며 이 시방서와 도면은 계약체결후 공사가 공급하는 “공사용”이라고 표시한 시방서 및 도면의 발행에 따라 폐기, 대체 될 수 도 있다.  이 시방서 및 도면은 발급즉시 계약서의 일부가 되며 계약상대자는 이러한 시방서 및 도면과 그 부대 수정시방서나 도면에 따라 작업을 수행해야 한다.

⑤ 계약상대자는 현장에 공사가 공급한 최신개정 도면 및 시방서를 유지하고 항상 감독원이 이를 확인할 수 있도록 하여야 한다. 공사수행시 가장 최신개정 도면만을 사용하여야 한다.

⑥ 계약상대자는 시공기술시방서나 도면에 인용된 각종 규격집을 현장에 비치해두어 항상 사용이 가능하도록 해야 한다.

⑦ 계약상대자는 공사준공후 공사가 제공한 도면 및 시방서를 공사에 반납 또는 감독원 확인하에 폐기하여야 한다.

제17조(계약상대자 작성도면) ① 계약상대자가 작성 제출하는 도면은 계약후 공사가 제공하는 설계통합기준서, 현장설계변경절차서 및 자료관리절차서에 따라 제출해야 한다.

② 계약상대자는 추후 공사가 지정하는 전산시스템과 완벽한 호환성을 갖춘 시스템을 구축하여 공사가 지정하는 주요도면은 반드시 전산화시켜 공사에 제공하여야 한다

제18조(Shop Drawings) ① 계약상대자는 기존 설계도면만으로는 시공이 애매한 특정 상세부분에 대하여 Shop Drawings을 감독원에 제출하여야 한다.

② Shop Drawings이라함은 계약상대자, 하도급자 및 공사관련자들이 계약에 따른 상세사항을 보여주기 위하여 감독원에게 제출하는 도면과 이와관련된 사항을 의미하며, Shop Drawings에는 상세도면, 도표, 배치, 도면설명, 공정, 시행방법, 시험자료 및 기타 특정시방규정 또는 도면을 설명하는 내용이 포함되어야 한다

③ 계약상대자는 모든 Shop Drawings을 수정, 관리하고 정밀도, 완성도, 계약내용과의 일치성등을 검토하여 감독원에게 승인을 득해야 하며, 감독원은 이를 승인을 할 수 없을 경우 그사유를 계약상대자에게 통보한다

④ Shop Drawings이 필요한 부분에 대하여  감독원의 승인을 득하지 않고 시행된 공사 또는 감독원이 승인했다하더라도 그 제출물(도면등)의 누락이나 잘못으로 시행된 공사에 대해서는  계약상대자 책임하에 재시공하여야 한다

⑤ 만약 Shop Drawings이 기존 설계도면과 다를 경우에는 제출시 일반 Shop Drawings과 분리하여 차이점을 기술하여야 하며 차이점이 경미하거나 금액및 공사기간의 변동이 수반되지 않는 경우를 제외하고는 승인된 Shop Drawings을 기준으로 현장 설계변경절차에 따라 설계변경할 수 있다

⑥ Shop Drawings의 승인을 득하기 위하여 계약상대자는 관련서류 4부를 감독원에게 제출하여야 하며 이경우 감독원은 3부를 보관하고 1부는 검토의견을 첨부하여 계약자에게 결과를 통보한다

⑦ 작업이 완료되면 최종적으로 재생산이 가능한 Shop Drawings 1세트를 감독원에게 제출하여야 하며 이도면에는 착수시부터 인도되는 시기까지 수행된 수정사항과 변경사항들을 포함하여야 한다.

제19조(준공도집) ① 최종준공도집은  공사가 제공하는 준공도 작성절차서 요건에 맞도록 작성, 제출하여야 한다.

② 공사마무리단계에 그공사에 더이상의 수정 또는 변동이 없다고 예상될때 감독원으로부터 CAD화일 또는 원도 1세트를 불출받아 준공도집을 작성하여야 하며 도집작성시 제도기술은 설계원도의 제도기술과 동등이상 수준으로 ①항의 절차서에 엄격히 일치하여야 하며 제출물이 외국어로 작성된경우 한글로 번역된 것이 첨부되어야 한다

③ 설계내역에 따른 공사가 완료되면 계약자는 공사에 대한 최종승인내용과 일치하게 그 내역에 적절한 준공도집원본을 최종공사 준공검사시 감독원에게 제출하여야 하며 제출된 도면에 수정 또는 변경사항이 없을 경우 준공도집을 공사가 지정하는 전산시스템과 완벽한 호환성을 갖춘 시스템으로 전산화시켜 8mm자기테이프 또는 Compact Disc등의 전산매체와 함께 공사에 제공해야 한다.

제20조(기타) ① 본 공항시설은 국가 중요시설 보안측면에서 “가”급 기준이므로 시공을 목적으로 불출된 일체의 설계도서 및 CAD화일등은 시공이외의 목적으로 사용하여서는 안되며 특히 외부유출을 하여서는 안된다.