물품구매계약 특수조건

【특수조건 12호 2014. 5. 7. 】

【특수조건 43호 2020. 10. 20. 】

제1조(적용) 이 조건은 공사가 행하는 물자 중 내자의 구매 (“제조”를 포함한다.)계약에 적용하며, 이 조건에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 물품구매 계약일반조건(이하"일반조건"이라 한다.)에서 정하는 바에 의한다.

제2조(용어의 정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “수요부서”이라 함은 계약된 물품을 구매요청한 인천국제공항공사(이하“공항공사”)의 부서 또는 계약대상자로부터 물품을 인수 할 기관을 말한다.

2. “검사”라 함은 계약목적물이 관련법령에 적합하고 구매규격ㆍ시방서대로 제조ㆍ설치 되었는지 여부를 검사담당자가 확인하는 것을 말한다.

3. “시험”이라 함은 계약목적물의 물리적인 기능ㆍ성능ㆍ특성 또는 화학적인 변화ㆍ반응 등을 해당 시험기관에서 측정ㆍ분석하는 것을 말하며 그 시험성적은 제2호의 검사에 활용된다.

4. “검수”라 함은 제2호의 검사에 합격된 계약목적물이 손상 또는 훼손품이 없고 납품서류상의 수량대로 납품되었는지 여부를 물품출납 담당자가 확인하는 것을 말한다.

제3조(계약보증금의 면제와 지급각서 제출) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령(이하 “시행령”이라 한다.) 제50조 제6항의 규정에 의하여 계약보증금의 전부 또는 일부가 면제된 경우에 계약상대자는 공항공사 귀속사유가 발생시 해당 계약보증금을 현금으로 납입할 것을 확약하는 계약보증금 지급각서를 1인 이상의 연대보증인(인감증명서 첨부)의 서명 또는 날인을 받아 제출하여야 한다. 다만, 시행령 제50조 제6항 제1호 및 제3호의 경우는 연대보증인을 세우지 아니할 수 있다.

제4조(검사 및 검수) ①계약상대자는 납품이행을 완료한 때에는 납품하는 물품이 관계법령, 공고문, 계약서, 납품요구서 등에 적합하다는 것을 확인하기 위해 수요부서에 검사를 요청하여야 한다. 다만, 계약서 또는 납품요구서에서 지정한 납품장소가 아닌 장소(계약상대자의 생산공장 또는 기타장소)에서 검사하여 줄 것을 요청한 경우에는 납품에 필요한 제반사항의 준비를 완료한 후 검사를 요청하고 검사에 합격한 경우 납품기한 내에 지정된 납품장소에서 검수를 요청하여야 한다.

②제1항에 불구하고 시운전조건부계약은 별도로 정하는 조건에 의한다.

③수개의 수요부서에 분할 납품하는 조건으로 계약체결(“납품요구”를 포함한다. 이하같다.)하였을 때에는 계약상대자는 그 대표부서에 대하여 일괄하여 검사요청할 수 있다. 이 경우 당해 대표부서의 지시에 따라 각 개별 부서에 분할하여 납품기일까지 검수 요청하여야 한다.

④제1항 및 제3항에 의하여 검사ㆍ검수요청한 경우에 납품일자는 다음 각 호의 1에 의한다.

1. 제1항 본문 경우의 납품일자

가. 납품기한 내에 검사 요청을 하고 검사에 합격한 경우에는 검사요청일

나. 납품기한 내에 검사 요청을 하였으나 납품기한 이후에 검사불합격 등에 따른 보완조치를 한 경우에는 최종적으로 검사에 합격한 날

다. 납품기한을 경과하여 검사 요청을 한 경우에는 최종적으로 검사에 합격한 날

2. 제1항 단서 및 제3항 경우의 납품일자는 검수를 요청한 날

제4조의 2(포장) ①계약상대자는 납품할 물품의 포장을 일반조건 제5조, 계약예규 제14조에 의거 내용물의 보전에 충분하도록 포장하여야 하며, 골판지 상자를 사용하여 포장하는 경우에는 재활용이 가능하도록 포장상자를 평철사 대신 강력접착제로 접합하여야 한다.

②계약상대자는 단위당 포장이 필요하여 소단위 포장을 하는 경우에도 제1항에 준하여 재활용이 가능하도록 포장상자를 풀, 종이테이프, 강력접착제 등으로 접합하여야 한다.

제5조(시험) ①계약상대자는 관계법령 또는 구매규격서에 의하여 시험ㆍ형식승인 등을 필하여야 할 주요물품에 대하여는 물품납품시에 시험성적서 또는 형식승인서를 수요부서에 제출하여야 한다. 이 경우 계약상대자는 시험 실시 전에 수요부서와 사전 협의하여야 한다.

②제1항에 의하여 국가공인 시험기관 시험(제조자 자체시험 포함)을 수요부서에서 제4조에 의한 납품검사로 인정한 경우에는 최종 시험의뢰 일자를 물품납품 및 영수증(이하“납품영수증”이라 한다. 이하 같다.)상의 납품검사 요청일로 한다,

제6조(지체상금) ①계약담당자는 납품기한을 경과하여 납품하였을 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금율을 계약금액 또는 납품대가에 곱하여 산출한 금액을 지체상금으로 결정하고 계약상대자에게 지급될 대가에서 상계한다. 이 경우 납품기한의 마지막 날이 공휴일(휴무일인 경우를 포함한다)인 경우에는 공휴일의 다음 날(공휴일이 2일 이상 연속되는 경우에는 마지막 공휴일의 다음날)을 납품기한으로 한다.

②제1항의 규정에 의한 지체일수는 다음 각 호에 따라 산정하며, 예시와 같이 계산한다.

1. 제4조 제1항 본문의 지체일수 산정의 경우

가. 납품기한 내에 검사요청을 하고 납품기한 경과 후 검사에 합격하고 검수완료한 경우에는 납품검사 및 검수에 소요된 기간은 지체일수에 포함하지 아니한다.

나. 납품기한 내에 검사요청을 하고 납품기한 경과 후 검사에 합격하지 못하여 보완지시를 한 경우에는 보완지시일부터 최종 검사에 합격한 날까지를 지체일수에 산정한다.

다. 납품기한 경과 후에 검사요청한 경우에는 납품기한 익일부터 최종 검사에 합격한 날까지를 지체일수에 산정한다.

2. 제4조 제1항 단서 및 제3항의 경우

가. 납품기한 내에 검사합격후 검수요청을 하고 납품기한 경과 후 검수완료한 경우에는 납품검수에 소요된 기간은 지체일수에 포함하지 아니한다.

나. 납품기한 내에 검사요청을 하고 납품기한 경과 후 검사에 합격하지 못하여 보완지시를 한 경우에는 보완지시일부터 검수요청일까지를 지체일수에 산정한다.

다. 납품기한 경과 후에 검사를 요청한 경우에는 납품기한 익일부터 검수요청일까지를 지체일수에 산정한다.

3. 실제 검사 또는 검수가 지연되어 납품기한을 경과하였을 때에는 검사 또는 검수 소요기간을 초과한 일수를 지체일수에 포함하지 아니하며, 납품기한을 경과하여 검사요청을 한 경우에도 계약상대자의 책임이 아닌 사유로 검사 또는 검수가 지연된 때에는 지연된 일수를 지체일수에 포함하지 않는다. 다만, 검사 또는 검수 지연사유가 계약  상대자에게 책임이 있을 경우에는 그 초과일수 또는 지연일수를 지체일수에 산입한다.

4. 산정된 지체일수에서 일반조건 제24조 제3항의 각 호의 1에 해당되는 일수를 차감한다.

구 분	제4조 제1항 본문 규정	제4조 제1항 단서 및 제3항 규정
지체일수 산 정	(1)납품기한이 10일인 계약에서 10일 이전에 검사를 요청한 경우 : 지체 없음 (2)납품기한이 10일인 계약에서 10일 이전에 검사요청을 하고, 12일에 검사에 불합격하여 보완지시를 받고 17일에 최종 검사에 합격한 경우 : 6일 지체	(1)납품기한이 10일이고 검사소요기간이 3일인 계약에서 실제 9일에 검사요청하여 14일에 검사완료하고 17일에 검수요청한 경우 : 5일지체(7일 지체에서 검사지체일수 2일 공제) (2)납품기한이 10일인 계약에서 10일 이전에 검사요청을 하고, 12일에 검사에 불합격하여 보완지시를 받고 17일에 최종 검사에 합격하고 19일에 검수를 요청한 경우 : 8일 지체
	(3)납품기한이 10일인 계약에서 실제 17일에 검사를 요청하여 20일에 완료한 경우 : 10일 지체 (4)납품기한이 10일인 계약에서 실제 12일에 검사요청을 하고, 15일에 검사불합격하여 보완지시를 받고 20일에 최종 검사에 합격한 경우 : 10일 지체	(3)납품기한이 10일인 계약에서 실제 11일에 검사요청하여 16일에 검사완료하고 20일에 검수요청한 경우 : 10일 지체 (4)납품기한이 10일인 계약에서 실제 12일에 검사요청을 하고, 15일에 검사불합격하여 보완지시를 받고 20일에 최종 검사에 합격하고 22일에 검수요청한 경우 : 12일 지체

제7조(단가계약) ①단가계약에 대한 납품은 계약조건 범위내에서 납품수량, 납품기한, 납품장소, 인도조건, 분할납품여부, 기타 필요한 사항 등을 포함하여 계약담당자가 발급하는 납품요구서에 의한다.

②계약수량은 계약기간 동안의 구매예상량을 추정한 수량이며, 실제 납품요구량이 이보다 적거나 없어도 이에 대하여 공항공사는 어떠한 책임도지지 아니한다.

③계약담당자는 필요한 경우에는 연간 구매량의 100분의 10범위 내에서 증량하여 납품 요구할 수 있다. 다만, 계약상대자의 동의가 있을 때에는 위 요구량을 초과하여 납품 요구할 수 있다.

④1회 최대 납품요구량은 연간 구매예상량의 100분의 (    )을 기준하되 증량이 필요한 경우에는 제3항을 준용한다.

⑤계약담당자는 필요한 경우에는 계약상대자의 동의를 받아 계약기간을 연장할 수 있다,

⑥계약상대자는 납품기한 이전이라도 수요부서로부터 계약물품의 일부에 대한 분할 납품 요청이 있을 때에는 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 응하여야 한다.

⑦계약상대자는 제4항에서 정한 1회 최대 납품요구금액이 증가하는 경우에는 그 초과금액에 해당하는 소정의 추가 계약보증금을 계약담당자가 정하는 바에 따라 공항공사에 납부하여야 한다.

제8조(계약금액의 감액 또는 환수) ① (삭제)

②계약담당자는 계약체결 후에도 계약상대자가 예정가격 또는 계약금액 결정(제9조에 의한 사후원가 검토를 포함한다.)에 참고토록 제출한 증빙자료가 위조, 변조 또는 사실과 상이한 사실이 명백한 것으로 확인되거나 기타 고가구매로 판명될 때에는 고가로 계약된 금액 상당액을 계약금액에서 감액 또는 계약상대자로부터 환수할 수 있다.

③계약담당자는 계약종결 후 제1항 및 제2항에 정한 환수사유가 발생하였을 때에는 계약상대자에게 그 사유를 통지한 후 지급할 타지급 금액에서 이를 공제할 수 있으며, 타지급 금액이 없을 때에는 계약상대자가 현금으로 공사에 납부하여야 한다.

제9조(사후원가 검토) ①계약상대자는 사후원가 검토조건으로 계약을 체결한 경우에는 납품이 완료되어 대가를 청구하는 날까지 사후 원가계산서 및 이 내용에 대한 투입수량ㆍ단가ㆍ비용 등을 입증할 수 있는 증빙자료를 계약담당자에게 제출하여야 한다.

②계약담당자는 계약상대자가 제출한 자료를 검토하여 사후원가검토금액(이하 “검토금액”이라 한다)을 산출하고 검토금액과  계약금액을 비교하여 다음 각호와 같이 지급대금을 확정한다. 이 경우 계약금액을 변경하여 지급하되, 이미 지급된 경우에는 계약상대자에게 감액을 반환하도록 청구하거나 증액을  지급하여야 한다.

1. 검토금액이 계약금액보다 낮은 경우에는 그 차액을 계약금액에서 감액한 금액

2. 검토금액이 계약금액과 동일한 경우에는 당초 계약금액

3. 검토금액이 계약금액보다 높은 경우에는 계약당사자간에 예산, 사후원가 인정범위 등을 고려하여 계약체결 전에 협의한 범위 내 금액

③계약상대자는 제2항에 의한 계약금액의 감액 또는 환수 통지에 이의가 있을 때에는 통지 받는 날로부터 7일 이내에 서면으로 이의를 신청하여야 하며 동 기한 내에 이의를 신청하지 않을 때에는 이의가 없는 것으로 간주한다.

④계약담당자는 제2항에 의한 사후원가 검토 완료 시까지 계약금액의 100분의 10에 해당하는 금액만큼을 지급 유보할 수 있으며 이 금액에 대한 이자는 지급하지 아니한다. 다만, 계약상대자가 유보금액 이상에 상당하는 보증서(시행령 제37조 제2항 각 호의 1에 해당하는 보증서로서 보증기간이 납품완료 후 6개월 이상일 것)를 제출하는 경우에는 당해 유보금을 지급할 수 있다

⑤제2항에 의하여 기지급된 대가를 환수하는 경우에는 제8조 제3항을 준용한다. 다만, 제4항 단서에 의거 보증서를 제출한 경우로서 타지급 금액이 없거나 계약자가 현금으로 납입하지 않는 경우에는 즉시 당해 보증기관에 해당금액을 청구하여야 한다.

제10조(선금지급) ①계약담당자는 계약상대자로부터 선금지급 신청이 있을 때에는 선금을 지급할 수 있다.

②제1항에 따라 선금을 지급할 때에는 계약상대자가 선금지급을 신청한 당시의 「정부 입찰·계약 집행기준」제33조에 따라 지급하되, 계약상대자로부터 채권을 확보하고 선금에 대한 사용 및 반환조건을 이행한다는 내용의 확약서를 받아야 한다.

③계약담당자는 제1항과 제2항에 따라 선금을 지급한 후 계약기간이 연장되는 경우에는 채권의 보증기간 연장과 추가 발생할 이자에 대한 보증금액이 증액된 보증서 등을 계약상대자로부터 제출받아야 한다.

④제2항에 따라 선금을 지급한 후 계약상대자의 귀책사유로 인하여 선금을 반환받는 경우에는 다음 각 호의 금액을 계약상대자에게 청구한다.

1. 선금잔액

2. 선금잔액에 대한 약정이자 상당액(한국은행 통계월보상의 대출평균금리 수준에 따라 산출한 금액을 말한다)

⑤계약담당자는 선금지급시 채권확보를 면제한 계약상대자에 대하여는 선금 반환사유가 발생한 때에 제4항에 해당하는 금액을 현금으로 반환할 것을 확약하는 지급각서를 제출받아야 한다. 다만, 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업협동조합(이하 “조합”이라 한다) 또는 그 중앙회에 선금을 지급하는 경우에는 실제 선금을 지급 받는 조합을 피보험자로 하는 지급보증서 또는 이행보증서 사본 등 채권확보 증빙서류와 조합의 지급각서를 함께 제출받아야 한다.

⑥계약상대자가 선금을 수령한 후 중소기업으로부터 원자재, 부품, 반제품, 금형 등을 구입하거나 외주가공 등을 하는 경우에는 현금으로 그 대금을 지급하여야 한다. 이 경우 이를 증명할 수 있는 서류(입금명세서, 영수증 등)를 선금사용내역서에 첨부하여 제출하여야 하며, 만약 이를 이행하지 않는 경우에는 우리공사 선금지급특수조건 제3조 및「정부 입찰·계약 집행기준」제33조에서 규정한 선금 의무지급률을 초과한 금액을 회수하여도 이의를 제기할 수 없다.

제11조(대가지급) ①계약담당자는 시행령 제58조 제1항의 규정에 의한 기한내에 대가를 지급할 수 없을 경우에는 그 사유를 계약상대자에게 통지한 후 지급기한을 5일 까지 연장할 수 있다.

②설치ㆍ시운전 조건부 계약인 경우로서 공사의 귀책사유로 인하여 설치 또는 시운전 할 수 없을 경우에는 제10조에도 불구하고 계약금액의 70%에 해당하는 금액을 선금으로 지급하고 당해 물품에 대한 설치ㆍ 시운전이 완료된 후 물품 대가 전액을 지불한다. 다만, 물품 설치 후 시운전이 1개월 이상 장기 지연된 경우로서 공사로부터 승인을 받은 때에는 공사에 대가지급액에 대한 보증서 등(시행령 제37조 제2항 각 호의 1에 해당되는 보증서)을 제출하고 납품영수증을 발급 받을 수 있다.

③계약담당자는 계약상대자가 제2항의 단서에 의한 납품영수증을 제출하는 경우에는 해당 납품 대가를 지급할 수 있다.

④교육훈련비 등이 계약서상 별도로 구분 표시되어 있는 경우에는 동 교육훈련 등이 완료되었음을 확인하는 수요부서 문서에 의하여 해당 금액을 지급한다.

⑤계약상대자는 제1항 내지 제5항에 의한 대가지급에 대한 이자를 청구할 수 없다.

⑥공항공사는 계약상대자의 요청으로 본 건 계약상대자가 수령 할 대금으로 계약상대자의 체납세금(국세 및 지방세)을 정산처리 할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 『체납세정산처리요청서』를 작성하여 공항공사에 제출하여야 한다.

제12조(하자보수) ①계약상대자는 제4조에 따른 납품일(시운전조건부 계약인 경우에는 시운전이 완료된 날)로부터 계약서에 명시된 기간(하자기간이 다른 복수물품은 품명별 하자기간) 동안(이하“하자담보책임기간”이라 한다) 납품한 물품의 하자에 대한 보수책임이 있다. 다만, 하자담보책임기간이 경과되었을지라도 그 기간 내에 하자보수를 요청한 경우에는 수요부서에서 하자보수가 완료되었음을 확인한 날에 하자담보책임기간이 종료된다.

②제1항에도 불구하고 계약상대자는 자신의 고의 또는 중과실로 하자가 발생한 경우에는 하자담보책임기간과 관계없이 하자보수하여야 한다.

③계약담당자는 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이함을 발견한 때에는 그 사실을 계약상대자에게 통지하고 해당물품의 대체 납품 또는 물품대금을 반환하도록 청구할 수 있다.

④계약상대자는 제1항부터 제3항의 하자보수 등을 통지받은 때에는 즉시 보수작업을 하거나 대체 납품하여야 하며 이에 따라 발생되는 제경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

제12조의2(하자보수보증금 납부) ①계약상대자는 제12조제1항에 따른 하자보수를 보증하기 위하여 계약금액의 100분의5에 해당하는 금액을 현금 또는 시행령 제37조제2항 각 호의 보증서 등으로 납품검사 완료일까지 납부하여야 한다(시운전조건부계약인 경우에는 시운전 완료일까지 납부하여야 한다).

②시행령 제62조제4항에 의하여 하자보수보증금의 전부 또는 일부를 면제하는 경우 계약상대자는 국고 귀속 사유가 발생한 때에 해당 하자보수보증금을 현금으로 납입할 것을 확약하는 하자보수보증금지급각서를 반드시 제출하여야 한다.

③계약상대자가 하자담보책임기간 중 공사로부터 하자보수 요구를 받고도 정당한 이유없이 이에 불응한 경우에는 하자보수보증금을 공사에 귀속한다.

④하자보수보증금은 제12조제1항에 정한 기간이 종료된 후 계약상대자의 청구에 따라 반환한다.

⑤하자담보책임기간이 1년인 물품에 대하여는 제1항부터 제4항을 적용하지 아니할 수 있다.

제13조(물가변동으로 인한 계약금액 조정방법) ①일반조건 제5조, 계약예규 물품구매 일반조건 제11조에 따라 물가변동으로 인한 계약금액의 조정 시(품목조정율, 지수조정율)을 적용한다.

②계약금액 조정후 조정된 단가는 조정기준일 이후 납품분부터 적용한다.

③제2항에도 불구하고 계약상대자의 귀책사유로 납품이 지연된 경우, 증액조정시에는 종전(납품기한 시점)단가를 적용하고, 감액조정 시에는 조정단가를 적용한다.

④물가변동에 의한 가격인상시 조정기준일 이후 조정신청일 전에 기 납품대가 지급분은 물가변동 적용대상에서 제외한다.

제14조(장기계속계약 및 계속비계약) ①장기계속계약을 체결할 경우 제2차 이후의 계약은 부기한 총계약금액에서 이미 계약한 금액을 공제한 금액의 범위 안에서 계약을 체결한다.

②계속비계약인 경우에는 총 계약금액으로 계약을 체결한 후 일반조건 제5조, 계약예규 물품구매 일반조건 제12조제3항에 따라 분할 납품 할 수 있는 경우에는 각 회계연도 예산의 범위 내에서 대가를 지급한다.

제15조(입찰참가 자격제한) ①계약담당자는 계약상대자가 구매계약을 체결하여 납품함에 있어 납품 검사 결과 불합격된 사실이 입찰참가신청일 기준(수의계약시 당일 포함) 과거 1년 동안에 3회 이상인 경우에는 공사가 실시하는 입찰 및 가격협의 참가를 제한할 수 있다.

제16조(계약의 해제 또는 해지) ①계약담당자는 계약상대자가 다음 각 호의 1에 해당될 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 일반조건 제5조, 계약예규 제26조 제1항 각 호의 1에 해당되는 경우

2. 시행령 제76조의 규정에 의하여 입찰참가 자격 제한을 받는 경우

3. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을 위반하여 공정거래위원회로부터 불공정 거래 행위자로 통지된 경우

4. 제17조에 의하여 제출된 품질 등의 표시서 내용이 허위 또는 사실과 상이한 것으로 판명된 경우 또는 납품된 물품의 시험결과 품질이 이 표시서 상의 품질에 미달되어 납품기한 내 시험 합격품을 납품할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우

②계약담당자가 제1항에 해당되어 계약을 해제 또는 해지할 경우에는 일반조건제5조, 계약예규 제26조 제2항 및 제3항을 준용한다.

제17조(종합낙찰된 물품의 사후관리) ①계약상대자는 시행령 제44조 규정에 의하여 품질ㆍ성능ㆍ효율 등을 종합적으로 고려하여 계약을 체결한 경우에는 계약물품 납품시 대한민국 소재 국가 공인시험기관 또는 공항공사가 인정하는 국제공인시험기관의 시험에서 합격되었음을 확인할 수 있는 시험성적서를 수요부서에 제출하여야 한다.

②수요부서는 제1항에 의한 시험성적서 확인 결과 계약상대자가 입찰시 제시한 품질 등의 표시서상의 품질ㆍ성능ㆍ효율에 미달할 경우에는 납품한 물품을 인수하여서는 아니된다. 다만, 성능 미달품에도 불구하고 인수하여야할 불가피한 사유가 있는 경우에는 상호협의하에 계약금액을 감액할 수 있다.

제18조(계약 해석의 우선 순위) 계약내용에 대한 해석의 우선 순위는 다음과 같다. 다만, 계약서류에 명시되어 있지 않거나 국가를당사자로하는계약에관한법률 및 동법시행령 특례 등 관계법령상의 강행규정에 저촉되는 사항에 대해서는 그 강행규정을 적용한다.

1. 계약서(갑ㆍ을지)

2. 계약특수조건(추가)

3. 계약특수조건

4. 물품구매 규격서(시방서 및 보완규격 포함)

5. 계약일반조건

6. 물품구매 입찰유의서

7. 제안서 및 입찰설명서

제18조의 2(단가계약) <삭제>

제18조의 3(입찰 공동행위 방지)개찰결과 담합이라고 판단할 수 있는 정황인 경우에는 당해 입찰을 유찰시키고 재공고를 실시하며, 모든 입찰자는 재공고 입찰조치에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

제18조의 4(납품이행 등) <삭제>

제18조의 5(제조물책임) ①계약상대자는 공항공사에 납품한 물품으로 인해 제조물책임이 발생하지 않도록 사용설명서 제공, 주의․경고 표시, 기타 제반의 노력을 다하여야 한다. 특히, 계약상대자는 납품시 계약물품에 제조업체 및 공급업체를 명확히 표기하여야 한다.

②계약상대자가 제조 내지 공급한 제조물로 인해 피해가 발생하였다는 주장이 제기된 제조물책임 사고에 대하여 계약상대자는 그 클레임 및 소송을 방어해야 하며 그로 인한 모든 책임을 부담하여야 한다. 또한 계약상대자는 공항공사가 제공한 규격․사양 등에 이상이 있음을 알았을 경우에는 이 사실을 공항공사에 고지하여야 하며, 규격․사양 등과 관련한 공항공사 등의 제조물책임 여부에 대한 입증책임은 계약상대자에게 있다.

③계약상대자는 제조물책임법에 따라 책임을 부담할 자가 따로 있는 경우에는 그 사유 및 책임질 자에 대한 관련내용을 공항공사에 통보하여야 한다.