연간단가계약 일반조건

2019. 11. 12.

자  재  처

자재운영부

연간단가계약 일반조건

2018.03.05. 개정

2019.11.12. 개정

제1조 (목  적)

물품구매 연간단가계약을 체결함에 있어 물품구매(제조)계약일반조건(이하 “계약일반조건”이라 한다) 제3조 제2항에 의거 계약일반사항 외에 당해 계약의 적정한 이행을 위한 특수조건을 정하는데 있다.

제2조 (용어의 정의)

이 조건에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “저장품목”이란 배전공사용 고빈도 수요 및 중요 물자로서 효율적인 수급관리를 위해 일정 재고수준을 유지하는 품목을 말하며, 대상품목은 구매자가 따로 정한다.

2. “비저장품목”이란 전력용 기자재로서 저장품목을 제외한 모든 품목을 말한다.

3. “발주예시”란 인도지시서 발행 전에 계약상대자에게 발주예정량을 미리 알려주는 것을 말하며, “예시품목”이란 발주예시에 의해 조달하는 품목을 말한다.

4. “조합”이란 중소기업협동조합법에 의하여 설립된 협동조합을 말한다.

5. “정량발주”란 단가계약 품목의 재고수준이 미리 정해진 재주문점 이하로 떨어지면 시스템에 의해 경제적 일회주문량을 자동 발주하는 것을 말한다.

<’19.11.12. 신설>

제3조 (계약기간)

① 본 단가계약 이행기간은 계약 시 계약기간을 따로 정한 경우 이외에는 계약체결일로부터 1년간으로 한다. 다만, 계약만료일까지 새로운 단가계약이 체결되지 않을 경우에는 계약당사자간 합의에 의하여 새로운 단가계약 체결 시까지 본 계약기간을 연장할 수 있다. 또한 새로운 단가계약을 체결했지만 초도 납품이 되지 않는 경우에는 계약당사자간 합의에 의하여 초도 납품시까지 본 계약기간을 연장할 수 있다.

② 계약만료전이라도 정부 정책, 규격폐지 등 구매자의 부득이한 사유 발생 시 계약당사자간 합의에 의하여 계약기간을 조기 종료할 수 있다.

③ 계약기간 만료 전에 인도지시(예시품목은 확정예시주문 포함)한 물량에 대하여는 계약기간 경과 후라도 납품의무를 진다.

제4조 (계약수량)

① 계약수량은 계약기간 동안의 구매예상량을 추정한 수량이며, 실제 주문량이 이보다 적거나(없는 경우 포함) 늘어나더라도 이에 대하여 구매자는 어떠한 책임도 지지 아니한다.

② 구매자는 연간단가계약에 따른 발주량이 계약수량을 초과하거나 초과할 것이 충분히 예상되는 경우에 변경계약 체결을 요청하며, 그외 계약수량 증감사유 발생시 변경계약 체결을 요청할 수 있다. 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.  <’19.11.12. 신설>

제5조 (발  주)

① 월 최대발주량은 계약수량의 12%를 기준으로 하되, 계약기간이 1년 미만일 경우 아래표에 따르며, 이를 초과하여 발주하는 경우에는 계약당사자간 협의하여 납기 및 납품수량을 조정할 수 있다.  <’19.11.12. 비율 개정>

단가계약기간	3개월	6개월	9개월
월단위 최대발주량	계약수량의 50%	계약수량의 25%	계약수량의 17%

② 동일 품목에 대하여 계약상대자가 2 이상인 경우에는 계약상대자별 계약수량 비율에 따라 발주량을 배분함을 원칙으로 한다. 다만, 발주 또는 납품 편의상 필요한 경우및 계약상대자의 사정에 의해 납품 지체중인 경우에는 발주건별 물량은 계약수량 비율에 따르지 아니할 수 있다.

③ 계약상대자가 조합 또는 다수업체인 경우, 공급업체의 사정에 의하여 지정납기 내납품이 불가능하거나 납품 지체기간이 60일 이상인 경우에는 계약상대자의 자체 배정기준에 관계없이 붙임 #4의 공급동의서를 제출한 업체 중 다른 업체를 구매자가 지정하여 배정 요청할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다.

④ 단가계약품목은 본사에서 인도지시함을 원칙으로 한다. 다만, 구매자의 사정에 의해 사업소 조달로 위임된 품목은 사업소에서 인도지시 할 수 있다.

⑤ 정당한 이유 없이 인도지시서 수령을 거부하는 경우에는 계약일반조건 제29조(계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지)를 적용하여 계약을 해제하거나 해지할 수 있다.

⑥ 발주방식은 정기발주와 정량발주(수시발주)에 의하며, 발주방식별 대상품목은 구매자가 별도로 정한다.  <’19.11.12. 개정>

⑦ 저장품목은 발주예시제를 통해 정기발주하는 것을 원칙으로 한다.

⑧ 저장품목 중 콘크리트 전주는 구매자의 사업소에서 월 최대 4회 정기발주하며 발주예시제가 적용되지 않는다.

주문차수	그룹	인도지시일	납기일
1차	A,B,C	당월 3일	익월 3일
2차	A	당월 11일	익월 11일
3차	A,B	당월 18일	익월 18일
4차	A	당월 26일	익월 26일

⑨ 저장품목 중 정량발주 품목은 구매자의 발주시스템에 의해 수시로 자동 발주한다.

<’19.11.12. 신설>

⑩ 비저장품목은 품목에 따라 월 1회 또는 2회 정기발주한다. 다만, 부득이 추가소요 발생시는 그 사유를 명시하여 특별청구가 가능하다.

구 분	월2회 조달품목	월1회 조달품목
주문일	매월 15일, 말일	매월 15일
대상품목	개폐기류, 변압기류 등	전력량계 및 그 부속자재

⑪ 정기발주일이 토요일, 일요일 또는 공휴일(구매자의 사창립기념일 등 포함)인 경우에는 그 직후 영업일에 실시하는 것을 원칙으로 한다.  <’19.11.12. 신설>

제6조 (발주예시)

① 본사에서 인도지시하는 저장품목은 발주예시를 통해 조달함을 원칙으로 한다. 다만, 정량발주 품목은 예외로 한다.  <’19.11.12. 단서 신설>

② 발주예시는 잠정예시, 확정예시 순으로 품목에 따라 월 1회 또는 2회 정기적으로 실시하며, 품목별 예시주기는 구매자가 따로 정한다.

예시차수	그룹	잠정예시	확정예시	인도지시일	납기일
1차	A,B,C	전월 3일	당월 3일	당월 26일	익월 3일
2차	A,B	전월 18일	당월 18일	익월 11일	익월 18일

③ 잠정예시는 납품예정일부터 2개월 전에 한국전력 전자조달시스템(KEPCO SRM/통합공고/발주계획/물품구매계획)에 게시하는 방법으로 실시하며, 확정예시는 잠정예시일로부터 1개월 후에 예시주문서를 발행하는 방법으로 전력 EDI를 통해 실시함을 원칙으로 한다.

④ 예시량은 구매자의 예시차수별 소요판단량에 의하되, 확정예시량은 당해 잠정예시량의 80% 이상으로 함을 원칙으로 한다.

⑤ 잠정․확정예시일 및 인도지시일이 토요일, 일요일 또는 공휴일(구매자의 사창립기념일 등 포함)인 경우에는 그 직후 영업일에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

<’19.11.12. 신설>

제7조 (납  품)

① 납품장소는 다음과 같이 정함을 원칙으로 하되, 품목별 단가계약특수조건 또는 인도지시서에 따로 정한 경우에는 그에 따른다.

1. 저장품목   : 사업소 자재창고

2. 비저장품목 : 공사 현장 원칙, 필요한 경우 사업소 자재창고 가능

② 납품조건은 계약조건 또는 인도지시서상 별도 명시가 없는 경우 현장하차도를 원칙으로 한다.

③ 인도지시서상의 기준납기는 인도지시일로부터 다음과 같이 정함을 원칙으로 하되, 필요에 따라 상호 협의하여 조정할 수 있다. 저장품목 중 비예시품목․정량발주 품목과 비저장품목은 발주와 동시에 인도지시 된다.

1. 저장품목   : 5일(영업일 기준)

다만, 비예시 정기발주 품목은 30일, 정량발주 품목은 40일  <’19.11.12. 단서 개정>

2. 비저장품목 : 40일

다만, 단가계약 체결 후 최초로 납품하는 물량에 대해서는 생산일정 등을 감안하여 납기일을 상호 협의를 통해 50일 이내의 범위에서 조정할 수 있다.

④ 전선 가공계약 등 원자재 사급조건에 의한 계약의 경우 원자재 사급시기는 납기일 30일 이전으로 하고 사급 지연 시 당초 납기에 사급지연 기간을 가산한 납기를 확정 납기로 한다.

⑤ 구매자의 사정에 의하여 분할납품이 필요한 경우에는 인도지시서에 정한 바에 따르며 그 횟수 및 물량은 계약당사자간 협의하여 처리한다.

⑥ 계약상대자가 인도지시서상의 납품기한(또는 연장된 납품기한)을 초과하여 60일 이상 계속 지체할 경우에는 계약일반조건 제29조(계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지)에 의거 계약을 해제하거나 해지할 수 있다. 다만, 계약일반조건 제27조 3항의 각호에 해당하는 경우 해당일수는 지체기간에 산입하지 아니한다.

⑦ 6항에 해당되는 계약상대자가 조합인 경우에는 계약을 해제 또는 해지 않고 잔여 계약기간동안 해당 조합 회원사에 물량배정 중지를 요청할 수 있다. 다만, 구매자의 물량 배정 중지 요청 후에도 계속 배정 시에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

⑧ 구매자의 요청에 의한 납품기한 조정은 연간단가 계약기간 종료 후 6개월 이내 범위에서만 가능하며 이 기간을 초과할 수 없다. 계약상대자는 구매자로부터 연간단가계약 종료 후 6개월 초과시점에 납품할 것을 요청받은 경우 이를 거절할 수 있으며, 그에 따른 어떠한 불이익도 받지 않는다.  <’19.11.12. 신설>

⑨ 공사 현장으로 납품되는 물품은 현장납품 이행시 물품대금을 지급한다. 다만, 보관공간 등 구매자의 사정으로 부득이 계약상대자의 야적장 등에 보관하여야 하는 경우 구매자와 계약상대자간 물품보관 계약서가 납품 증빙으로 제출되면 물품대금을 지급할 수 있다.  <’19.11.12. 신설>

제8조 (구매규격의 개정시 적용)

① 계약기간 중 구매규격이 개정되어 공포되거나 계약상대자에게 통보되었을 때에는 공포 또는 통보된 시행일 이후 계약(인도지시)분부터 개정된 구매규격에 의하여 납품하여야 한다. 다만, 개정된 구매규격에 의한 납품이 어렵다고 구매자가 인정하는 경우 또는 개정된 구매규격에 의한 납품이 가능한 계약상대자가 없는 경우에는 수요(발주)부서와 협의하여 개정 전 구매규격에 의해 납품할 수 있으며, 시행일 이전에도 계약당사자간 협의하여 개정 후 구매규격에 의해 납품할 수 있다.

② 구매규격 개정에 의하여 원가의 변동요인이 발생하였을 때에는 변경계약을 체결할수 있다.

제9조 (검  사)

① 단가계약품목의 검사 소요일수는 6일(수송기간 3일 별도)을 원칙으로 한다. 다만, 계약체결 시 검사소요일수를 따로 정한 경우 그에 따르며, 시험면제 지정품목은 시험검사 소요일수를 제외할 수 있다.

② 예시품목은 확정예시 주문서에 따라 시험검사를 실시한다.

③ 단가계약품목의 부분품으로서 단독시험 및 봉인이 가능하고 시험에 장시간을 요하는경우에는 계약상대자의 요청에 따라 계약일반조건 제12조 제9항에 준하여 해당 부분품에 대한 사전검사를 실시할 수 있다.

제10조 (하자보증)

① 하자보증기간은 구매규격에 별도 명시된 경우를 제외하고는 다음과 같다. 다만, 필요할 시는 계약당사자간 협의하여 조정할 수 있다.

하자보증기간	대상품목
납품후 1년 6개월간	간이수리 변압기
납품후 2년간	전선휴즈, 중수리 주상변압기
납품후 2년 6개월간	심야전력용 타임스위치, 래치형 전자접촉기 전력량계(전자식, 수리품 포함) ※ 전력량계 검정품은 검정 익일부터 3개월 이내에 물품을 납입해야 함
납품후 3년간	주상변압기, 지상변압기(수리품 포함) 송전용 현수애자, 접속재(직선, 종단, 엘보)
납품후 4년간	피뢰기(폴리머피뢰기 포함), Eco-부하개폐기(가공용) 가스절연부하개폐기(수동․자동형, 지중․가공용) 고장구간 자동개폐기, 폴리머(에폭시몰드)절연부하개폐기 폴리머 리클로져, 폴리머 내오손용 결합애자 라인포스트 애자(자기, 폴리머)
납품후 5년간	C.O.S, 배전용 현수애자(자기 191mm, 폴리머) ABC-W, FR CNCO-W 및 TR CNCV-W, TR CNCE-W TR CNCE-W/AL, FR CNCO-W/AL

② 하자보상기간은 통보일로부터 2개월을 원칙으로 하며 하자보상이 지연될 경우에는 지체일수(보상기간 경과 후 보상완료일까지)에 대하여 반출시점의 신품가격의 1,000분의 0.75에 해당하는 금액을 지체상금으로 징구한다.  <‘17.12.28. 개정>

③ 계약상대자가 조합인 경우에는 납품업체가 부도 등으로 하자처리가 불가능할 경우 계약상대자가 하자보상책임 의무를 진다.

④ 구 규격 제품 및 구입이 중지된 품목의 하자 발생에 대하여는 현행 규격품으로 대체 납품하여야 하며, 이때의 대체 납품기간은 통보 후 2개월 이내로 한다.

⑤ 단가계약품목의 하자보수보증금률은 납품금액의 100분의 5로 한다.

⑥ 하자교체 시 비용부담 등 하자와 관련하여 본 조건에 명시되지 아니한 사항은 구매자가 따로 정한 하자관리지침에 따른다.

제11조 (품질보증)

계약상대자는 기자재의 품질을 확보하기 위하여 신뢰성 품질 등급 적용 품목에 대하여 배전품질보증구매시방서(QPS-D-001)에 정한 바에 따라 품질보증 활동을 하여야 한다.

1. 대상품목

현수애자(191mm, 254mm, 폴리머), 라인포스트애자(일반, 내염), 주상변압기, 지상설치형 변압기, 가공․지중형G/S, 자동화용G/S, FR CNCO-W 및 TR CNCV-W, TR CNCE-W, TR CNCE-W/AL, FR CNCO-W/AL, COS, 전력량계, LA(폴리머 포함)

2. 계약상대자는 계약규정 제3장 제2절(사전검사 및 중간검사)에 의거 배전기자재 품질확보를 위하여 실시하는 공정중(중간)검사 요청에 성실하게 협조하여야 한다.

3. 공정중검사 불합격의 처리

가. 검사자가 요구한 시정사항은 진행 중인 공정에 반영하여 철저히 이행하여야 하며, 조치결과 및 증빙자료를 검사자에게 서면으로 제출하여야 한다.

나. 제출한 조치결과 및 증빙자료는 승인을 받은 후 다음 작업공정으로 진행하여야 한다.

제12조 (배전기자재 품질등급제 적용)

배전기자재 품목 계약상대자는 기자재 품질향상을 통한 전력공급 신뢰도 향상과 공급사의 기술경쟁력 강화를 목적으로 구매자가 제정한 『배전기자재 품질등급제 기준』을 적용받는다.  <’19.11.12. 신설>

제13조 (전선 공리일 재활용)

전선류의 경우 전선포장용 공리일 재활용 조건으로 계약한다.

1. 대상규격 : “붙임 1” 참조

2. 재활용 대상 공리일 공급조건 : “붙임 2”

공리일을 해체하여 측판 및 좌판(동판)을 공급하며 단위는 조로 한다.

3. 공급장소 : 당해업체 생산공장 도착도(차상도)

제14조 (기타 사항)

① 조합은 계약체결 전에 계약이행 책임사항이 명시된 직접 제조업체의 공급동의서(“붙임 3”)를 제출하여야 한다.

② 사급자재에 대한 위험보전을 위하여 출하가격(사급자재의 시가)에 해당하는 현금 또는 이행보증 보험증권을 징수한다.  <’19.11.12. 단서조항 삭제>

③ 계약상대자는 구매자의 가격조사자료 제출 요구사항에 대하여 계약만료 2개월 전까지 가격조사자료를 성실하게 제출하고 가격조사업무에 적극 협조하여야 한다.

(붙임 1)

재활용 전선공리일 규격

□ 목재리일

리일 번호	적용전선	조장길이 (m)	재공급단가 (원)	비 고
8-6	22.9kV TR CNCE-W 60㎟	150	25,014	배전용
9-5		200	33,665	〃
10-3		260	41,003	〃
10-5		320	45,676	〃
13-1	22.9kV TR CNCE-W 325㎟ 22.9kV FR CNCO-W/AL 240㎟	150	58,693	〃
13-3		200	74,081	〃
13-5		260	79,897	〃
13-7		320	85,901	〃
8-6	22.9kV TR CNCE-W/AL 95㎟ 22.9kV FR CNCO-W/AL 95㎟	150	25,014	배전용
9-5		200	33,665	〃
9-7		260	38,035	〃
9-8		320	42,053	〃
11-3		420	58,732	〃
11-5		500	71,511	〃
13-3	22.9kV TR CNCE-W/AL 400㎟ 22.9kV FR CNCO-W/AL 400㎟	170	74,081	배전용
13-5		220	79,897	〃
13-7		280	85,901	〃
14-5		320	99,805	〃
14-7		400	115,634	〃
16-3		430	143,081	〃
16-4		530	153,276	〃
16-3	TR CNCE-W 600㎟	350 이상 ～ 400 이하	143,081	배전용
	FR CNCO-W 600㎟
	ACSR 410㎟	1,500 이상 ～ 2,000 이하		송전용으로 신품 1회 사용 후 배전용으로 2회 재활용
	ACSR/AW 410㎟
	ACSR 480㎟	1,400 이상 ～ 1,800 이하
	ACSR/AW 480㎟
16-4	TR CNCE-W 600㎟	400 이상 ～ 450 이하	153,276	배전용
	FR CNCO-W 600㎟
	ACSR 410㎟	2,000 이상 ～ 2,200 이하		송전용으로 신품 1회 사용 후 배전용으로 2회 재활용
	ACSR/AW 410㎟
	ACSR 480㎟	1,800 이상 ～ 2,100 이하
	ACSR/AW 480㎟

□ 프라스틱리일

리일번호	적용전선	조장길이(m)	재공급단가(원)	비 고
3-3	OW 22㎟	300	15,669	가공배전용
	OW 38㎟	300	〃	〃
	CV 35㎟(1C)	300	〃	〃
	ACSR 32㎟	600	〃	〃
	나경동연선 22㎟	600	〃	〃
4-5	OW 60㎟	300	31,518	〃
	OW 100㎟	300	〃	〃
	ACSR 58㎟	600	〃	〃
	ACSR/AW-OC 32㎟	600	〃	〃
	나경동연선 38㎟	600	〃	〃
6-6	ACSR 95㎟	600	41,208	〃
	ACSR-AW/OW(저) 35㎟	900	〃	〃
	ACSR/AW-OC 58㎟	600	〃	〃
	ACSR/AW-TR/OC 58㎟	600	〃	〃
	CV 70㎟(1C)	300	〃	지중배전용
	CV 120㎟(1C)	300	〃	〃
	OW 150㎟	300	〃	가공배전용
7-5	ACSR/AW-OC 95㎟	600	63,516	〃
	ACSR/AW-TR/OC 95㎟	600	〃	〃
	CV 240㎟(1C)	200	〃	지중배전용
	CV 300㎟(1C)	280	〃	〃
	CV 16㎟, 25㎟, 35㎟(2C)	300	〃	가공배전용
	CV 70㎟(2C)	260	〃	가공배전용
	CV 16㎟, 25㎟, 35㎟(4C)	300	〃	〃
	CV 70㎟(4C)	150	〃	〃
9-7	ACSR/AW-OC 160㎟	600	111,544	〃
	ACSR/AW-TR/OC 160㎟	600	〃	〃
	ACSR/AW-TR/OC 240㎟	550	〃	〃
	나경동연선 60㎟	1,000	〃	〃
	나경동연선 100㎟	600	〃	〃
	CV 120㎟(4C)	200	〃	〃

□ 재활용 프라스틱 전선보호판

보호판 규 격	품목 번호	조립수량 (set)	리일 번호	적용전선	재공급 단가(원)
1호	900121	6EA	3-3	OW 38㎟ 이하	19,705
				ACSR 32㎟ 이하	〃
				나경동선 22㎟ 이하	〃
				CV 1C 35㎟ 이하	〃
2호	900122	7EA	4-5	OW 100㎟ 이하	35,022
				ACSR 58㎟ 이하	〃
				ACSR/AW-OC 32㎟ 이하	〃
				나경동선 38㎟ 이하	〃
3호	900123	8EA	6-6	OW 150㎟ 이하	45,908
				ACSR 95㎟ 이하	〃
				ACSR/AW-OW 35㎟ 이하	〃
				ACSR/AW-OC 58㎟ 이하	〃
				CV 1C 120㎟ 이하	〃
				ACSR/AW-TR-OC 58㎟ 이하	〃
4호	900124	9EA	7-5	ACSR/AW-OC 95㎟ 이하	71,387
				CV 1C 300㎟ 이하	〃
				CV 2C 70㎟ 이하	〃
				CV 4C 70㎟ 이하	〃
				ACSR/AW-TR-OC 95㎟ 이하	〃
5호	900125	11EA	9-7	ACSR/AW-OC 160㎟ 이하	114,031
				나경동선 100㎟ 이하	〃
				ACSR/AW-TR-OC 240㎟ 이하	〃
				CV 4C 120㎟ 이하	〃

※ 단가계약기간 중 재공급단가 변경 시 변경된 단가로 매각함

(붙임 2)

목재 리일 재활용 공급조건

1. 재활용 대상품 : 측판 및 좌판(1식)

2. 사용 횟수 : 최초사용분을 포함하여 재사용 가능품에 한하여 3회 사용함을 원칙으로  하되, 제작 후 2년이 경과된 공리일은 재활용대상에서 제외한다. 단, 송전용으로 사용하는 목재공리일(16-3, 16-4)은 신품을 1회 사용 후 배전용으로

2회 재활용한다.

3. 사용횟수 색상표시

가. 사용횟수별 색상표시(도색)는 재활용 납품업체가 하여야 함

○ 2회 사용 시 황색,  3회 사용 시 청색

나. 색상표시방법 : 좌우 양쪽 측판 가장자리에 리일 규격에 따라 다음의 크기로 도색

리일규격	2-4, 3-3, 3-5	4-5, 4-6, 5-4	6-4 이상
크기	10㎝×10㎝	15㎝×15㎝	20㎝×20㎝

4. 표시사항 : 전선포장용 목재리일(ES-8130-0001) 규격에서 요구하는 표시사항을 스티                커에 인쇄하여 양쪽 측판에 고정한다. 단, 회전 방향표시와 리일 번호는

육안식별이 가능하도록 검정색 페인트로 표시한다.

5. 재공급 단가 : 전선구입가격에 계상된 리일(측판 및 좌판) 가격으로 하며 규격별

단가는 첨부 내역과 같음

6. 재공급 방법

가. 공급수량

○ 배전용 : 공급시점 물량을 기준으로 연간단가계약에 의한 업체별 배정률에 따름

○ 송전용 : 매회 전선주문량에 소요되는 리일 수량 공급

나. 공급시기 : 배전용은 경제적 수송물량 도달시마다 공급함을 원칙으로 하며, 송전                용은 해당전선 주문 시에 공급

다. 공급 인도조건 : 계약업체 생산공장 도착도로 하고 한전에서 수송함

라. 단가계약업체에 공급된 재활용 목재공리일이 파손 등으로 재활용할 수 없거나, 부족한 경우 신품 또는 상태가 양호한 해당 규격의 공리일로 자체 조달하여 납품할 수 있다. 단, 자체 조달한 재활용 목재공리일의 품질 불량 등으로 납품된 전선에

불량 또는 하자 발생 시 단가  계약업체는 책임지고 변상하여야 한다.

7. 납품물자의 검수 : 전선포장용 목재리일 규격에 의함

8. 공리일 대금 입금 :   매각 인도지시일로부터 15일 이내에 해당사업소 가상계좌로 입금

프라스틱 리일 재활용 공급조건

1. 재활용 대상품 : 측판 및 동판(1식)

2. 사용 횟수(기간)

최초 사용분을 포함하여 재사용 가능품에 한하여 10회 이상 사용함을 원칙으로 한다.

3. 사용횟수 색상표시

가. 사용횟수의 식별은 매회 납품 시 마다 측판에 칠한 페인팅 횟수(칸수)에 의함

나. 측판(2개 모두)의 도색 위치는 측판 가장자리의 빗살무늬 홈 안에 먼저 칠한 부분의 옆 칸부터 1칸씩 칠하되, 재권취연월을 동일 홈 안에 표기한다.

다. 도색은 유성페인트로 하며, 색상은 납품업체가 임의로 정한다.

- 가급적 흑색바탕과 대비가 되는 백색, 청색, 황색, 적색 계통의 색상으로 도색

4. 표시사항

전선포장용 프라스틱 리일(ES-8130-0002) 규격에서 요구하는 표시사항을 스티커에 인쇄하여 양쪽 측판에 고정한다.

5. 전선업체 재공급(매각) 단가

전선구입가격에 계상된 리일(측판 및 동판) 가격으로 하며, 재공급(매각)단가는 별첨내역과 같다.

6. 재공급 방법

가. 공급수량 : 공급시점 물량을 기준으로 연간단가계약의 업체별 계약비율에 따름

나. 공급시기 : 경제적 수송물량 도달시마다 공급함을 원칙으로 함

다. 공급 인도조건 : 계약업체 생산공장 도착도로 하고 한전에서 수송함

7. 전선납품시 리일에 대한 시험검사

전선포장용 프라스틱 리일 구매규격에 의거 시험검사를 받아야 한다. 다만, 리일 제작사 또는 전선납품업체가 사전에 시험검사를 받은 경우에는 합격품에 한하여 재시험하지 않으며, 전선업체에 재공급하여 재활용하는 물품은 외관 및 구조검사로 대체한다.

8. 재공급(매매) 대금 입금

매각 인도지시일로부터 15일 이내에 해당사업소 가상계좌로 입금시킴

프라스틱 전선보호판 재활용 공급조건

1. 재활용 대상품 : 프라스틱 전선보호판

2. 사용 횟수 : 최초사용분을 포함하여 재사용 가능품에 한하여 30회 이상 사용함을 원칙

으로 한다.

3. 사용횟수 색상표시

가. 사용횟수의 식별은 매회 납품시 마다 상부에 칠한 페인팅 횟수(칸수)에 의함

나. 도색 위치는 상부의 홈안에 먼저 칠한 부분의 옆칸부터 1칸씩 칠하되, 재권취

년월을 동일 홈안에 표기한다.

다. 도색은 유성페인트로 하며,색상은 업체가 임의로 정한다.

4. 표시사항 : 재활용 프라스틱 전선보호판(GS-8130-0007) 규격에서 요구하는 사항을

표시한다.

5. 재공급 단가 : 전선구입가격에 계상된 재활용 프라스틱 전선보호판 가격으로 하며

규격별 단가는 첨부 내역과 같음

6. 재공급 방법

가. 공급수량

○ 공급시점 물량을 기준으로 연간단가계약에 의한 업체별 배정률에 따름

나. 공급시기 : 경제적 수송물량 도달시마다 공급함을 원칙으로 함

다. 공급 인도조건 : 계약업체 생산공장 도착도로 하고 한전에서 수송함

7. 납품물자의 검수

재활용 프라스틱 전선보호판 구매규격에 의거 시험검사를 받아야 한다. 다만, 보호판

제작자 또는 전선납품업체가 사전에 시험검사를 받은 경우에는 합격품에 한하여

재시험하지 않으며, 전선업체에 재공급하여 재활용하는 물품은 외관 및 구조검사로

대체한다

8. 재공급(매매) 대금 입금

매각 인도지시일로부터 15일 이내에 해당사업소 가상계좌로 입금

(붙임 3)

공   급   동   의   서

상호 및 대표자 :

주   소(사무실) :

(공  장) :

전           화 : 사무실 -                         공장-

출 입 책 임 자  : 직  위 -                         성명 -

우리 회사는 한국전력공사와  ○○조합과 계약할 아래 물품에 대하여 ○○조합의 계약상의 모든 권리, 의무를 공동으로 부담하고 계약기간동안 한전의 발주물량을 수주 거부함이 없이 공급할 것을 동의합니다.

물품공급명세서

품 명	규 격	비 고

년.    월.    일

주       소 :

상       호 :

대   표  자 :                           (인) (원인감사용)

이   사   장                  (인) (원인감사용)

한국전력공사 사장 귀하

귀사의 연간단가계약 일반조건을 준수할 것을 승낙하며 서명날인 합니다.

업 체 명	대 표 자	날 인	비 고